Ⅰ. 호남고속철도 사업개요

목포

(임성리)

익

산

43.7㎞

오

송

정

읍

광주

송정

● 신설역(1)

● 개량역(5)

■ 차량기지(1)

경부

고속철도

천안아산

대전

서울

공

주

46.0㎞

42.1㎞

50.5㎞

48.6㎞

(230.9㎞)

■

군산선

전라선

경전선

부산

서대전

논산

김제

장성

함평

무안

차량기지

타당성조사중

호남선

182.3㎞

❍ 사업내용 : 오송～목포간 230.9㎞ 신선 건설

- 오송～익산(89.7km)～광주송정(182.3km)～목포(230.9km)

- 역사 신설 및 개량 : 6개역 (오송역 호남선부분 포함)

- 광주차량기지 신설

❍ 사업비/사업기간 : 10조 4,901억원 / 2006～2017년

- (오송～광주송정)  8조 5,197억원 / 2006 ～2014년

- (광주송정～목포)  1조 9,704억원 / 2006 ～2017년

- (차량구입비)  7,535억원

＊소요시간 : 용산～목포간 1시간 46분

구 분		용산～오송	오송～광주	광주～목포	비 고
연 장		121.8km	182.3km (304.1km)	48.6km (352.7km)	오송～목포 230.9km
소요 시간	현재	39분	120분 (159분)	26분 (185분)	격역 정차 (오송,익산)
	신선	39분	54분 (93분)	13분 (106분)
	단축	-	△66분(△66분)	△13분(△79분)

(   ) : 용산기점 누계

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총소요	‘09까지	‘10예산	‘11예산	‘12년이후
계	104,901	4,428	9,450	16,483	74,540
국 고	52,451	2,908	3,100	5,500	40,943
자 체	52,450	1,520	6,350	10,983	33,597

□ 공정추진

❍ '11.5월말 공정 : 23.67% (계획 23.12% 대비 102.4%)

❍ 월별/분야별 공정실적

- 월 별                                            (단위 : %)

구 분		‘10년까지	‘11. 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	계획	11.5	12.6	13.9	15.5	17.3	18.5	20.2	21.6	23.0	24.8	26.8	28.9	31.0
	실적	11.5	12.6	13.9	15.9	17.6	18.9	-	-	-	-	-	-	-
	대비	100.0	100.0	100.0	102.6	101.7	102.2	-	-	-	-	-	-	-
오송 ～ 광주송정	계획	13.9	16.5	19.2	20.3	21.6	23.1	25.3	27.0	28.8	31.0	33.5	36.1	39.1
	실적	13.9	16.5	19.3	20.6	22.0	23.7	-	-	-	-	-	-	-
	대비	100.0	100.0	100.8	101.5	102.0	102.4	-	-	-	-	-	-	-
광주송정～ 목포	계획	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	실적	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	대비	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 분야별(오송~광주송정)

구 분		‘10년 까지	‘11년				누계			비고
			당월	금년누계
				계획	실적	대비	계획	실적	대비
계		13.90	1.52	9.22	9.77	106.0	23.12	23.67	102.4
설 계		62.31	0.88	4.08	3.93	96.3	66.39	66.24	99.8
감 리		8.23	0.81	3.98	3.99	100.3	12.21	12.22	100.1
용 지		66.46	1.34	7.32	9.01	123.1	73.78	75.47	102.3
공사	계	12.48	1.60	5.26	5.78	109.9	17.74	18.26	102.9
	노 반	18.58	2.43	7.98	8.82	110.5	26.56	27.40	103.2
	궤 도	2.36	-	-	0.42	111.1	2.36	2.78	117.8
	건 물	-	-	-	-	-	-	-	-
	전 력	0.89	0.10	0.31	0.16	51.6	1.20	1.05	87.5
	통 신	2.60	0.06	0.31	0.31	100.0	2.91	2.91	100.0
	신 호	0.40	0.16	0.65	0.67	103.1	1.05	1.07	101.9
	차량기지	-	-	-	-	-	-	-	-
차 량 구 입		-	-	-	-	-	-	-	-