2024년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2024-13

담당부서

작성자

(시스템본부/시스템계획처)

(마성민/042-607-3514/msm@kr.or.kr)

정 책 명

동해선(포항~동해) 전철화 사업

사업개요

및

추진경과

ㅇ 노선도

ㅇ 사업개요

- 사업목적 : 부전~강릉간 전기차 일관 수송체계 구축으로 한반도 동측의 여객 및 화물수송 주요철도망 역할 수행 및 장래 남북철도 연계 대비 선로기능 향상

- 사업기간 : 2019 ∼ 2024년

- 총사업비 : 4,382억원

ㅇ 주요내용

- 포항~동해간 172.8km 단선 비전철 → 단선 전철화

ㅇ 추진경과

- ’16. 6. : ｢제3차 국가철도망구축계획｣에 포항~동해 전철화 반영

- ’18. 4. : 예비타당성 조사(기획재정부, B/C=0.59, AHP 0.468)

- ’19. 1. : ｢국가균형발전 프로젝트｣ 예비타당성 조사 면제사업 선정

- ’19. 3.~19. 7. : 사업계획 적정성 검토(기획재정부)

- ‘19.12.~20. 8. : 분야별 설계 시행

- ’20. 9. : 총사업비 협의조정(실시설계 결과) 완료

- ‘20.12. : 전차선로 신설공사 착공

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 처  장 이인희

- 최종 결재자 : 이사장 김상균

구 분	성명	직급	수행기간	담당업무
시스템본부	구욱현	본부장 (직무대행)	‘23.07.∼현재	시스템본부 업무 총괄
	구욱현	처장	‘23.07.∼현재	전철화사업 총괄
	신이섭	부장	‘23.07.∼현재	전철화사업 담당
영남본부	곽연수	본부장	ˊ24.01.∼현재	영남본부 관내 업무 총괄
	홍석진	단장	ˊ23.07.∼현재	사업단 업무 총괄
	김종민	부장	‘23.01.∼현재	동해선 전철화 총괄
	나 현	부장	ˊ23.07.∼현재	동해선 전철화 시스템업무 총괄
	김태원	부장	‘23.07.∼현재	동해선 전철화 궤도업무 총괄
	이경국	부장	‘23.07.∼현재	동해선 전철화 건축업무 총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 국토부 철도국 : 철도건설과장 오송천, 사무관 김은철

ㅇ 계약상대자

구 분	설계	공사	감리
궤 도	㈜케이알티씨	상경토건(주)	현기술단
건 축	㈜종합건축사사무소근정	㈜동양	㈜한국종합건축사사무소
		청암종합건설㈜
		백선건설㈜
송변전	동산엔지니어링(주), ㈜디투엔지니어링, 세종기술(주)	샤론일렉콤(주)	㈜한국코아엔지니어링
		(합)명신건설
		풍성건설(주)	벽산파워(주)
		㈜대전사
전력	㈜배산엔지니어링, 벽산파워(주), ㈜디투엔지니어링	우신전설(주)	㈜한국코아엔지니어링
		㈜우진이앤씨
		벽산전기	벽산파워(주)
		㈜대흥디씨티
전차선	㈜배산엔지니어링, 벽산파워(주), ㈜디투엔지니어링	㈜대림	㈜한국이알이시
		승아전기(주)
		㈜에이스원이앤씨
		우민전기(주)	㈜디투엔지니어링
		(유)일석
		합자회사 부원전기
신 호	신우이엔지 주식회사	㈜보원엔지니어링	신우이엔지(주)
		대선이엔씨(주)
		㈜대금이앤아이	㈜경인기술
통 신	대한엔지니어링(주)	㈜웨이브컴	㈜세영

추진실적

ㅇ ’18. 4. : 예비타당성 조사(기획재정부, B/C=0.59, AHP 0.468)

ㅇ ’19. 1. : ｢국가균형발전 프로젝트｣ 예비타당성 조사 면제사업 선정

ㅇ ’19. 3.~19. 7. : 사업계획 적정성 검토(기획재정부)

ㅇ ˊ20.12.  : 전차선로 신설공사 착공

ㅇ ˊ21. 6.  : 전철전원공사 착공

ㅇ ˊ22. 12. : 사업실시계획 변경 승인(‘22.12→’24.12)

ㅇ ˊ23. 2.  : 동해선 전철화 궤도공사 완료

ㅇ ˊ23. 10. : 사업실시계획 변경 승인