보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2017. 7. 17.(월)	총 매수 1매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 기술본부 차량처TF / 처장 최종호, 종합시운전부장 김형룡 (042-607-4522)
철도공단, 시운전 열차 투입 대비 수색~서원주 고속화 구간 일제점검 - 7월 17일(월)부터 일주일 동안 점검... 10월 말부터 인천~강릉 전 구간 종합시험운행 -

□ 한국철도시설공단(이사장 강영일)이 2018 평창 동계올림픽대회 수송지원을 위해 고속화를 추진하고 있는 수색∼서원주 기존선(108.4㎞)에 시운전 열차를 투입하기 위하여 7월 17일(월)부터 21일(금)까지 일주일 동안 철도 시설물 전반에 대한 정밀점검을 실시한다고 밝혔다.

○ 공단은 철도유관기관 전문 인력들을 참여시켜 사전점검 팀을 꾸리고, 궤도․전차선․신호 3개 분야 61개 항목에 대하여 시운전 열차가 230km/h로 안전하게 운행할 수 있는지 여부를 집중 점검하게 된다.

□ 수색～서원주 기존선 고속화 사업은 KTX 등 고속열차가 최고속도 230㎞/h로 운행할 수 있도록 기존 시설물을 현대화하는 사업으로,

○ 이번 정밀점검 결과, 시운전 열차의 고속운행에 지장이 없다고 판단되면 8월 28일(월)부터 10월 13일(금)까지 28일 동안 시운전 열차를 실제 230㎞/h로 운행하면서 신호체계시험 등 총 14종의 시설물 검증을 시행하게 된다.

○ 이어 10월 24일(화)부터 11월 말까지는 실제 영업상황을 가정하여 인천국제공항(제2여객터미널)～수색～서원주～강릉 전 구간(236.5㎞)에 KTX 열차를 투입하여 운행체계 적정성․운행관리능력․여객편의설비 등을 점검하고 기관사의 노선숙지훈련을 병행해 안전하고 완벽한 개통에 철저히 대비한다.