--

보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2014. 6. 4.(수)	총매수 1 매
	배포부서 홍보실(042-607-3082)
담당부서 수도권본부 건설기술처/ 처장 양종대, 부장 장형식(02-788-5291)

‘14.6.3일 국민일보 쿠키뉴스의 “철도공단 변전소공사 ’위험지연 논란...  하도급업체 ”갑의 횡포” 의혹보도에 대해 아래와 같이 해명합니다

□ 현재 철거 중인 (구)의정부변전소는 당초 설계된 공법으로 시공이 곤란하여, 설계보완을 위해 일정시간이 소요된 것은 사실이나,

○ ㈜두오건설산업이 당초 15억원이 소요되는 공사를 70억원이나 소요되는 무리한 공법으로 변경해 줄 것을 지속적으로 요구하고,

○ 자신의 요구가 관철되지 않자 ‘13.11.20일부터 일방적으로 공사를 중지하여 원도급사가 ㈜두오와의 계약을 타절하였음.

※ 타절 : 공사를 수행하는 자가 능력이 없거나 불법수주, 부도 등의 사유로 지속적인 공사 수행능력이 없다고 판단되어 공사를 중단하는 행위

□ ㈜두오는 계약 타절 이후에도 각종 장비를 동원하여 공사를 방해하여 원도급사는 업무방해혐의로 사법당국에 고소하였고, ㈜두오는 공사중지가처분 소송을 제기하였으나 기각되었음.

※ ‘14.5.20 의정부지방법원 2014카합117

○ ‘14.4월부터 보완한 공법으로 공사를 재개하여 올해 8월말까지 공사를 완료할 계획임. (총 22억원 소요)

□ 현재 공단 감사실의 엄정한 감사가 진행 중으로, 감사결과 책임소재에 따라 조치 예정임.

※ 본 해명내용은 ‘14.5.22일(목) 해럴드생생뉴스 보도에 대해 보도참고자료를 통해 이미 사실을 밝힌 바 있음.