보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2016. 5. 17.(화)	총 매수 1매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 강원본부 건설기술처 / 처장 김용두, 건축설비PM부장 조동환 (033-810-5151)
원주~강릉 철도 강릉차량기지 본격착공, 2017년 말 개통순항 - 차량기지 포함 전체 사업 공정률 62%... 금년 말까지 86% 달성 목표 -

□ 한국철도시설공단 강원본부(본부장 노병국)는 평창동계올림픽의 성공적인 개최를 지원하기 위한 원주∼강릉 철도건설사업 가운데 강릉차량기지에 대한 공사에 본격 착수하여 2017년 12월 적기개통을 위한 공정이 차질 없이 진행되고 있다고 밝혔다.

○ 강릉차량기지는 열차의 안전운행을 위한 필수시설로써, 현재 건설을 위한 용지매수가 순조롭게 진행(78%)되고 있으며, 잔여 용지매수는 중앙토지수용위원회의 수용재결을 거쳐 6월 말까지 모두 완료할 계획이다.

○ 현재 연약지반 처리 및 성토․절토 작업 등 부지조성 공사에 본격 착수하였으며, 여객차검수고 등 열차검수를 위한 건축물 공사는 금년 8월 시작할 예정이다.

□ 노병국 본부장은 “원주∼강릉 철도건설사업이 현재 62%의 공정률을 보이며 순조롭게 진행되고 있다”며 “금년 말까지 86%의 공정률을 달성, 2017년 12월 노선을 차질 없이 개통하여 평창동계올림픽의 성공적인 개최를 적극 지원하겠다”고 말했다.