[붙 임]

궤도분야 주요자재 사전공고(안)

2018. 03

Ⅰ. 목 적

□ ´18년 궤도공사에 소요되는 주요 자재의 안정적인 수급과 효율적인 공정추진을 위하여 구매발주 방안을 수립하고 적기 구매·지급하여 공정준수에 만전을 기하고자 함.

- 대상품목 : KR형 레일체결장치, Bi-block침목, e-클립형 체결장치, 사전제작형 콘크리트패널(PST)

* 관련근거 : 궤도분야 지급자재 추가확대(궤도처-162(´18.01.17)

Ⅱ. 사업별 구매수량

□ 구매내역

품 목	사 업 명	규 격	수 량	비 고
레일체결장치	울산∼신경주 복선전철	KR형 레일체결장치	189,622조
	도담∼영천 복선전철		171,844조
Bi-block 침목	울산∼신경주 복선전철	KR형 Bi-block침목	62,467개
	도담∼영천 복선전철		49,618개
레일체결장치	울산∼신경주 복선전철	e-클립 레일체결장치	136,062조
	도담∼영천 복선전철		324,114조
	익산∼대야 복선전철		79,178조
	군장국가산업단지		97,546조
	포항영일만신항		27,974조
	울산신항인입철도		40,898조
사전제작형	울산∼신경주 복선전철	사전제작형 PST-B형	4,043개
	도담∼영천 복선전철	사전제작형 PST-C형	4,538개

Ⅲ. 궤도자재 구매계획

□ 궤도공사의 주요자재의 안정적인 수급과 효율적인 공정추진을 위해 KR형 레일체결장치, KR형 Bi-block 침목, e-클립형 레일체결장치, 사전제작식 콘크리트패널(PST)의 품목별, 사업별로 분리 구매하고, 총액계약(장기계속)으로 구매 발주 추진

□ 계약형태 : 총액계약(장기계속)

□ 업체선정 방식

○ KR형 레일체결장치

- 입찰방법 : 제한경쟁 입찰

- 입찰참가자격 : 아래 ①, ②, ③을 모두 만족하는 업체

①「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 입찰참가자격을 등록한 업체(국내 제조업체에 한함)

* 세부품명번호 : 철도용콘크리트침목체결구 [2524043401]

② 공단, 철도기술연구원과 기술실시권 협약을 체결한 업체

③ 납품한 실적이 있는 업체 또는 납품실적이 없는 업체는 시제품을 제작하여 계약서(시방서)의 품질기준을 만족(공인기관 시험성적서)하는 업체

○ Bi-block 침목

- 입찰방법 : 일반경쟁 입찰

- 입찰참가자격 : 아래 ①, ②을 모두 만족하는 업체

①「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 입찰참가자격을 등록한 업체

* 세부품명번호 : 철로용콘크리트침목 [2524050102]

② 생산설비를 리스, 렌탈한 업체는 ①항을 만족하더라도 입찰에 참가 할 수 없음.

○ e클립 레일체결장치

- 입찰방법 : 일반경쟁 입찰

- 입찰참가자격 :

「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 입찰참가자격을 등록한 업체(제조 업체에 한함)

* 세부품명번호 : 철도용코일스프링클립 [2524043801]

○ 사전제작형 콘크리트패널(PST)

- 입찰방법 : 제한경쟁 입찰

- 입찰참가자격 : 아래 ①, ②을 모두 만족하는 업체

①「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 입찰참가자격을 등록한 업체(해외 업체 제외)

* 세부품명번호 : 철로용콘크리트침목 [2524050102]

② 특허기술에 대한 기술실시권 사용계약을 체결한 업체

③ 생산설비를 리스, 렌탈하여 생산하는 업체는 ①+②항을 만족하더라도 입찰에 참가 할 수 없음.

Ⅲ. 품질확보 방안 및 추진일정

□ 신규 참여업체 품질확보 방안

○ KR형 레일체결장치

- 신규참여업체는 입찰시 시제품의 관리, 조합체시험(공인기관 시험성적서) 결과에 대하여 확인하며, 납품전 양산제품에 대한 조합체 성능시험 시행

* KR형 레일체결장치 입찰참여 기준(궤도처-2633(´17.08.25)호)

○ Bi-block 침목

- 신규업체는 낙찰 후 생산설비 확장 등 설비보완을 시행하고, 양산제품 납품 전 표준규격(KRSA-1005)에 의한 성능시험 시행

- 아울러, Bi-block 침목은 보편화 되어 기술수준이 안정화 되어 있어 기존에 시행중이던 제작검사자를 폐지하고, 건설사업관리단(감리원)을 적극 활용하여 품질관리 시행

○ e-클립용 레일체결장치

- 신규업체는 낙찰 후 생산설비 확장 등 설비보완을 시행하고, 양산제품 납품 전 표준규격에 의한 성능시험 시행

* KRSA-1001, KRS-0014(KR C 14060, 부록2 레일체결장치 기술기준)

○ 사전제작형 콘크리트패널(PST)

- 신규업체는 낙찰 후 생산설비 확장 등 설비보완을 시행하고, 양산제품 납품 전 표준규격에 의한 성능시험 시행

* KRSA-1002(PST-B형), KRSA-T-2017-1004(PST-C형)

□ 추진일정

구 분	공개설명회	구매방침	구매계약 (입찰공고)	생산준비 (설비보완)	반 입 (납품)
KR형 레일체결장치	'18.03	'18.04	'18.04	-	'18.07∼
KR형 Bi-block침목	'18.03	'18.04	'18.04	-	'18.07∼
e클립형 레일체결장치	'18.03	'18.04	'18.04	-	'18.07∼
사전제작형 콘크리트패널	'18.03	'18.04	'18.04	3개월	'18.10∼

* 상기 추진 일정은 공단 사업계획, 관리기준공정(IPS) 등에 변동될 수 있음

Ⅳ. 공지 사항

○ 공통사항

1. 입찰참가 자격 부적합 판정을 받거나, 입찰참가 자격을 받아 입찰에 참여하여 낙찰 받지 못할 경우 공단은 이에 대한 어떠한 책임을 지지 않는다.

2. 공단은 입찰 참가자격을 받은 업체의 자재를 구매해야 하는 의무가 발생하는 것이 아니며, 해당 업체에게 납품할 수 있는 권리나 권한을 부여하는 것이 아니다.

3. 입찰참가 자격을 받기 위한 설비투자, 시제품 제작, 품질시험 등의 판단은 입찰참가 희망업체의 자유의사에 의해 결정한 것이므로, 이에 따른 소요비용 등에 대하여 공단은 어떠한 법적, 행정적 책임과 의무를 지지 않는다.

4. 공단 사업계획에 따라 구매시기, 구매수량, 업체선정 방식 등이 변경될 경우 입찰참가 희망업체는 이에 대한 이의를 제기할 수 없다.

5. 계약업체는 적기에 납품 하여야 한다. 만일 품질미달, 생산지연 등으로 수급에 차질이 발생할 경우 계약서 및 관련법에 따라 공단은 계약변경 또는 계약해지를 할 수 있으며, 이에 대한 모든 책임과 의무는 낙찰업체에게 있다.

○ KR형 레일체결장치

1. KR 레일체결장치의 지식재산권은 공단과 한국철도기술연구원에 있다. KR 레일체결장치 제작 및 입찰에 참여하고자하는 업체는 구매입찰 전 반드시 지식재산권자(특허권자)와 기술사용계약(통상실시권)을 체결하여야 한다.

2. 입찰참가희망업체는 구매입찰 시 공인기관 시험성적서와 구성품에 대한 제작사(협력사) 현황에 대하여 제출하여야 하며, 이 경우 반드시 시험성적서의 제품(시편)은 구성품의 제작사(협력사)에서 제작한 제품이어야 한다.

○ KR형 Bi-block침목

1. 입찰참가 희망업체에 대한 침목공장 생산설비 심사는 시행하지 않는다.

2. 계약업체는 직접 생산설비 확장 등 설비보완을 시행하여야 하며 생산설비를 리스 또는 렌탈한 업체에 대하여 공단은 계약변경 또는 계약해지를 할 수 있다.

○ e클립형 레일체결장치

1. 계약업체는 납품 전 표준규격(KRSA-1001, KRS-0014(KR C 14060, 부록2 레일체결장치 기술기준))의 품질기준을 만족하는 공인기관 시험성적서를 제출하여야 한다.

○ 사전제작형 콘크리트패널(PST)

1. 사전제작형 콘크리트패널(PST-C형)의 지식재산권은 공단과 한국철도기술연구원, 삼표레일웨이㈜에 있으며, 사전제작형 콘크리트패널(PST-B형)의 지식재산권은 한국철도기술연구원, 삼표레일웨이㈜에 있다.

2. 사전제작형 콘크리트패널(PST) 제작 및 입찰에 참여하고자하는 업체는 구매입찰 전 반드시 1항의 지식재산권자(특허권자)와 기술사용계약(통상실시권)을 체결하여야 한다.

3. 계약업체는 직접 생산설비 확장 등 설비보완을 시행하여야 하며 생산설비를 리스 또는 렌탈한 업체에 대하여 공단은 계약변경 또는 계약해지를 할 수 있다.

4. 계약업체는 납품 전 표준규격(KRSA-1002(PST-B형), KRSA-T-2017-1004(PST-C형))의 품질기준을 만족하는 공인기관 시험성적서를 제출하여야 한다.

기타 문의사항은 우리 공단 궤도처(Tel. 042-607-3337)로 문의하여 주시기 바랍니다.