보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다	자료배포일 2013. 1. 25(금)	총 매수 1 매
	배포부서 홍보실
담당부서 건설본부 고속철도처 / 처장 이수형, 호남고속부장 이종범(042-607-4722)
호남고속철도 2014년 계획대로 완공 - 오송~광주송정 ‘13년말 77.8% 공정 추진 -

□ 한국철도시설공단은 수도권～호남권간 물류문제 해소와 한반도 반일생활권 실현 등을 위해 추진중인 호남고속철도 오송～광주송정간 182.3km를 2014년 계획대로 완공예정이라고 밝혔다.

□ 호남고속철도(오송～광주송정)는 2009년 5월 착공한 이래 현재까지 58.7%의 공정을 완료하였으며, 금년에는 노반 본선공사를 완료하고 궤도․전차선 등 후속공사도 본격시공하여 77.8%의 공정을 완료할 예정이며, 고속열차를 투입한 종합시운전 등을 거쳐 2014년 말 완공을 목표로 정상추진 중이다.

<참고> 주요공정 추진일정

공 종	공사기간	비 고
노반공사	‘09. 5 ～ ’13.11
장대레일 부설	‘13. 6 ～ ’14. 2
전차선 가설	‘13. 6 ～ ’14. 3
KTX 투입시험	‘14. 4 ～ ’14. 9
종합시험운행	‘14.10 ～ ’14.12