2023년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2023-04

담당부서

작성자

(건설본부/고속일반철도처)

(김동현/042-607-4725/kdh@kr.or.kr)

사 업 명

울산~포항 복선전철사업

사업개요

및

추진경과

ㅇ 노선도

ㅇ 사업개요

- 사업목적 : 경부고속철도 연계를 위한 전철망 구축 및 부산~울산~경주~포항 구간 여객 교통편의 제공 및 울산, 경주, 포항 지역개발 촉진을 위한 울산~포항 단선(73.2km) ⇒ 복선전철화(76.5km)

- 사업기간 : 2003 ~ 2023년

- 총사업비 : 2조 6,784억원

ㅇ 주요내용

- 울산∼포항 76.5km 복선전철 건설

ㅇ 추진경과

- ˊ98.12. : 국가기간교통망계획 사업확정(교통체계효율화법)

- ˊ00. 3. ~ ˊ00. 7. : 예비타당성 조사(기획예산처)

- ˊ03. 3. ~ ˊ03.11. : 타당성 조사 및 기본계획 시행

- ˊ04.06. ~ ˊ05.12. : 노반 기본설계 시행

- ˊ06.11. ~ ˊ08.12. : 노반 실시설계

- ˊ09. 4.23. : 사업실시계획 승인(제2009-197호)

- ˊ09. 4.27. : 노반분야 전공구(1~8공구) 공사 착수

- ˊ11. 3.    : 기획재정부 간이타당성 재조사 결과통보

- ˊ15. 4. 1. : 울산~포항 1단계(신경주~포항) 개통

- ˊ19. 8. 6. : 신경주~포항간 부분준공 고시(건설교통부 제2019-400호)

- ˊ21.12. : 울산~포항(태화강~신경주) 개통

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
건설본부	손병두	본부장	`22.08.29∼현재	건설본부 사업 업무 총괄
	한상연	처장	`23.01.18∼현재	고속일반철도 사업 업무총괄
	황병복	부장	`23.01.18∼현재	영남권 소관사업 업무 총괄
영남본부	김공수	본부장	ˊ22.5.2.∼현재	영남본부 소관사업 업무총괄
	윤영호	단장	ˊ22.5.2.∼현재	영남권사업단 소관사업 업무총괄
	김영진	부장	ˊ22.5.16.∼현재	울산포항 복선전철 노반 총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 국토교통부 : 철도건설과장 오송천, 담당사무관 김은철

ㅇ 설계사: KRTC, 유신, 벽산, 도화 등 12개사

ㅇ 시공사: ㈜에스케이건설, 대림산업(주), 현대산업개발(주), 한라건설(주), 한진중공업 등 14개사

ㅇ 감리사: ㈜동명기술공단, 대한콘설탄트, 수성 등 11개사

추진실적

ㅇ ˊ03. 3. ~ ˊ03.11. : 타당성 조사 및 기본계획

ㅇ ˊ04. 6. ~ ˊ05.12. : 노반 기본설계

ㅇ ˊ04. 7.26.        : 기본계획 고시(건설교통부 제2004-179호)

ㅇ ˊ06.11. ~ ˊ08.12. : 노반 실시설계

ㅇ ˊ09. 4.20. ~ 27.  : 노반 1~8공구 착공

ㅇ ˊ15. 4. 2.        : 신경주~포항간 개통(5~8공구)

ㅇ ˊ19. 8. 6.        : 신경주~포항간 부분준공고시(건설교통부 제2019-400호)

ㅇ ˊ21. 12.         : 태화강~신경주간 개통