서해선 복선전철 공정률(23년 1월말 기준)

분야		공정률(%)
계		91.6
설계		84.9
감리		70.5
용지		97.4
노반	1공구	97.3
	2공구	100
	3공구	100
	4공구	96.4
	5공구	99.7
	6공구	93.0
	7공구	100.0
	8공구	100.0
	9공구	98.1
	10공구	95.9
	기타	92.9
	소계	97.7
궤도		87.5
건물		85.0
전력		80.6
통신		51.9
신호		55.0
차량기지		58.4
부대		62.1