경부고속철도 2단계 건설사업 추진현황

1. 개 요

서울

광명

천안아산

오송

대전

김천구미

동대구

경주

울산

부산

417.5㎞

409.8㎞

대전도심

대구도심

신선

18.2㎞

27.1㎞

124.2㎞

17.6㎞

139.3㎞

14.8㎞

99.3㎞

138.8㎞

기존선

신선, 연결선

기존선

기존선

신선, 연결선

1

단

계

2

단

계

(‘10.11.1 기 개통)

ㅇ 경부고속철도(서울～부산) 건설사업 개요

- 연장 417.5㎞, 총 사업비 : 20조 6,479억원

- 서울, 광명역 등 10개역(신설 6개역 포함)

ㅇ 1단계(’92.6～2004.4) : 연장 409.8km, 사업비 12조 7,377억원

- 서울～동대구간 신선(238.6㎞), 대구～부산간 기존선(171.2㎞)

ㅇ 2단계(2002～2014) : 연장 169.5km, 사업비 7조 9,102억원

- 대구～부산구간(2002~2010) : 연장 124.2㎞ , 사업비 4조 9,138억원

- 대전도심구간(2008~2014) : 연장 18.2㎞, 사업비 1조 2,030억원

- 대구도심구간(2008~2014) : 연장 27.1㎞, 사업비 1조 6,703억원

- 동해남부선 연결선(2010~2014) : 연장 3.8km, 사업비 1,231억원

- 소요시간 : 서울～부산간 2시간 10분

* 1단계 : 4시간 10분(경부선 새마을호) ⇒ 2시간 40분(90분 단축)

* 2단계 : 2시간 40분 ⇒ 2시간 18분(22분 단축, ‘10.11월 대구이남 개통)

⇒ 2시간 10분(8분 단축, 대전․대구도심구간 개통시)

* 서울～포항 2시간 2분(1시간 33분 단축)

2. 공정현황

❍ '14. 8월말 공정 93.6%(계획 93.6% 대비 100.0%)

❍ 월별/분야별 공정실적

- 월  별                                           (단위 : %)

구 분	‘13년까지	‘14. 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계획	89.8	89.9	90.1	90.7	91.2	91.7	92.7	93.1	93.6	94.3	94.7	95.0	97.0
실적	89.8	89.9	90.1	90.7	91.2	91.7	92.7	93.4	93.6
대비	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.3	100.0

- 분야별

구 분		‘13년 까지	‘14년 계획	‘14년				누계
				당월	금년누계
					계획	실적	대비	계획	실적	대비
계		89.8	97.0	1.0	3.8	3.8	100.0	93.6	93.6	100.0
용 지		97.2	98.8	0	1.3	1.6	200.0	98.5	98.8	100.3
공사	노 반	92.9	98.7	0.3	4	5	114.3	96.9	97.9	101.0
	궤 도	81.1	91.7	0.2	7.7	6	75.0	88.8	87.1	98.1
	건 물	85.2	91.2	0.2	4.5	2.5	37.5	89.7	87.7	97.5
	전 력	82.0	95.2	1.1	8.3	5.5	60.0	90.3	87.5	96.9
	통 신	57.0	60.4	0	1.7	1.5	150.0	58.7	58.5	99.8
	신 호	86.3	100.0	0.3	7.1	5.9	86.4	93.4	92.2	98.7
	차량기지	92.3	92.3	0	0	0	100.0	92.3	92.3	100.0

❍ ‘14년 월별/구간별 공정계획 및 실적

(단위:%)

구 분		2014. 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2단계 합계	계획	89.9	90.1	90.7	91.2	91.7	92.7	93.1	93.6	94.3	94.7	95.0	97.0
	실적	89.9	90.1	90.7	91.2	91.7	92.7	93.4	93.6
	대비	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.3	100.0
도심 구간	계획	79.1	79.9	81.6	82.8	84.1	86.8	87.5	89.1	90.9	92.0	92.8	95.3
	실적	79.1	79.9	81.6	82.8	84.1	86.9	88.5	89.2
	대비	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.1	100.7	100.1
대전 도심	계획	81.5	82.4	84.7	86.4	88.0	90.2	91.5	93.0	94.0	94.8	95.5	98.5
	실적	81.5	82.4	84.7	86.7	88.5	90.4	92.2	93.7
	대비	100.0	100.0	100.0	100.4	100.5	100.2	100.8	100.7
대구 도심	계획	78.0	78.1	79.4	80.3	81.4	84.4	85.2	86.3	88.7	90.0	90.9	93.1
	실적	78.0	78.1	79.4	80.1	81.0	84.4	85.2	86.1
	대비	100.0	100.0	100.0	99.7	99.5	100.0	100.0	99.7
연결선	계획	74.9	75.4	76.1	76.8	80.6	84.6	84.7	84.9	90.1	91.1	91.2	100.0
	실적	74.9	75.4	76.1	76.8	83.0	84.6	84.8	84.8
	대비	100.0	100.0	100.0	100.0	103.1	100.0	100.1	99.9
대구이남	실적	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0