서해선 복선전철 공정률(2021년 6월)

□ 공정현황

분야		공정률(%)
계		77.2
설계		58.4
감리		52.2
용지		95.9
노반	1공구	88.8
	2공구	93.7
	3공구	91.8
	4공구	96.0
	5공구	96.5
	6공구	84.4
	7공구	98.2
	8공구	93.3
	9공구	88.7
	10공구	89.0
	기타	75.7
	소계	90.2
궤도		54.2
건물		34.0
전력		23.7
통신		19.3
신호		15.9
차량기지		44.2
부대		55.7