경부고속철도 2단계 건설

사업추진현황

2013. 5

한국철도시설공단

Ⅰ. 사 업 개 요

[ 노선도 ]

	범례	신설역 증축역 신선 도심
52.2㎞ 291.0㎞ 오송 대전 김천구미 동대구 신경주 울산 부산 노반 6-2～ 6-4B공구18.2㎞ 10-1～ 10-3A공구 22.7㎞ 10-4～11-4공구 65.8㎞ 13-1～14-3공구 58.4㎞ 33.3㎞ 73.1㎞ 53.8㎞ 49.0㎞ 29.6㎞ 10-3B공구 4.4㎞

○ 사업내용 : 169.5㎞ 신선 건설

- 동대구~부산 124.2km, 대전․대구도심 45.3km(지상건설)

* 대전도심 18.2km, 대구도심 27.1km(대구남연결선 4.4km ‘10년 개통)

- 역사 7개역(증축 3개역 포함) 및 차량기지 중정비시설

* 5개 역사 완료, 대전역 설계중, 동대구역 증축 시공 중

○ 사 업 비 : 7조 8,630억원

○ 사업기간 : 2002~2014년(대구이남 2010년, 대전 ․ 대구도심 2014년)

○ 대구이남 : 2010.11. 1 개통 완료

○ 사업비 집행계획

(단위 : 억원)

구 분	총소요	‘11 까지	‘12 예산	‘13 예산	‘14년이후
계	78,630	62,384	3,230	5,000	8,016
국 고	38,212	26,917	3,230	3,100	4,965
자 체	40,418	35,467	-	1,900	3,051

Ⅱ. 사업비 및 공정 현황

□ 사업비 집행실적

❍ '13. 4월까지 1,985억원('13년 예산 대비 39.7%) 집행

(계획 1,800억원 대비 106.7%)

(단위:억원)

분 야	총사업비	‘12년 까지 (집행율)	‘13년 예산 (집행율)	‘13년 집행금액			누 계
				계 (금년누계)	전월 까지	금 월 (4월)	계획	실적	대비
총 계	78,630	65,614	5,000	1,985	1,874	111	66,114	67,599	102.2%
		83.4%	6.4%	39.7%	37.5%		84.1%	86.0%	100.0%
설 계 (문화재포함)	1,920	1,649	2	0	0	0	1,649	1,649	100.0%
감 리	2,437	1,946	153	80	78	2	2,008	2,026	100.9%
용 지	8,406	7,945	275	17	15	2	7,947	7,962	100.2%
노 반	41,228	35,173	3,107	1615	1,519	96	35,547	36,788	103.5%
궤 도	5,802	4,196	505	41	41	0	4,209	4,237	100.7%
건 물	3,846	3,262	311	0	0	0	3,262	3,262	100.0%
전 력	5,565	4,223	380	163	153	10	4,263	4,386	102.9%
통 신	2,609	1,402	72	27	27	0	1,402	1,429	101.9%
신 호	4,247	3,441	192	41	41	0	3,450	3,482	100.9%
차량기지	2,187	2,019	1	0	0	0	2,019	2,019	100.0%
연구개발	273	255	0	0	0	0	255	255	100.0%
부 대	110	103	2	1	0	1	103	104	101.0%

※ 총사업비 : 제21차(‘12.11.30)기준

□ 공정추진실적

❍ '13. 4월말 공정 : 85.2% (계획 85.2% 대비 100.1%)

❍ ‘13년 월별/구간별 공정계획 및 실적

(단위:%)

구 분		2013. 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2단계 합계	계획	84.4	84.6	84.9	85.2	85.6	86.2	86.5	87.0	87.6	88.2	88.7	89.8
	실적	84.5	84.7	85.0	85.2
	대비	100.1	100.1	100.1	100.1
도심 구간	계획	66.1	66.5	67.0	67.4	68.4	69.9	70.7	71.9	73.3	74.8	76.2	79.0
	실적	66.3	66.6	67.1	67.6
	대비	100.2	100.1	100.1	100.3
대전 도심	계획	67.7	67.8	67.9	68.0	68.9	70.0	71.1	72.4	74.3	76.5	78.6	82.3
	실적	67.7	67.8	67.9	68.3
	대비	100.0	100.0	100.0	100.4
대구 도심	계획	64.0	64.9	66.0	66.9	68.0	69.9	70.4	71.6	72.7	73.6	74.5	76.6
	실적	64.1	65.0	66.6	67.0
	대비	100.2	100.2	100.9	100.3
연결선	계획	42.9	44.0	45.5	47.7	51.4	53.7	56.1	59.1	62.5	65.9	69.4	75.9
	실적	42.9	44.0	45.0	45.5
	대비	100.0	100.0	98.9	95.6
대구이남	실적	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0