2024년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2024-12

담당부서

작성자

(건설본부 / 고속일반철도처)

(박진영/042-607-3916/jpark@kr.or.kr)

정 책 명

춘천∼속초 철도건설

사업개요

및

추진경과

ㅇ 사업개요

- 사업목적

ㆍ 고속화 철도 교통망 구축으로 동서도시 활성화 및 동해선, 남북 및 대륙횡단(TSR) 철도를 연계한 교통물류망 구축

ㅇ 사업기간: 2016 ∼ 2027

ㅇ 총사업비: 2조 998,870백만원

* 백담정거장의 신호장 외 역 설치 추가비용 70억원 지자체(강원도, 인제군) 부담

ㅇ 주요내용

- 춘천∼속초간 93.7km 철도건설

ㅇ 추진경과

- 2016. 7. : 예비타당성조사 통과(기재부, B.C 0.79,AHP=0.518)

* 예타 조사 3회 시행(2001 - 0.49 / 2010 - 0.73 / 2012 – 0.67)

- 2016. 11.: 타당성 조사 및 기본계획 용역 착수

- 2020. 3. 3. : 기본계획 고시

* 국토교통부고시 제2020-222호

- 2020. 6.    : 일괄입찰공사(T/K) 1,7공구 입찰공고

- 2020. 12.   : 일괄입찰공사(T/K) 1,7공구 실시설계 적격자 선정

- 2021. 7.    : 기타설계 6개(2,3,4,5,6,8)공구 노반 기본설계 완료

- 2021. 11.   : 기타설계 6개(2,3,4,5,6,8)공구 실시설계 착수

- 2021. 12.   : 7공구 실시설계 적격심의 및 계약체결

- 2022. 6. 2. : 춘천∼속초 1,7공구 사업실시계획 승인

* 국토교통부고시 제2022-288호

- 2022. 9. : 1공구 실시설계 적격심의 및 계약체결

- 2023. 3. : 기타공구(6개) 설계심사 완료

- 2023. 12.: 기타공구(6개) 설계적정성 검토 완료

- 2024. 1. : 기타공구(6개) 실시설계dhksfy

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
본사 건설본부	손병두	본부장	’22.8.29.∼현재	건설본부 소관사업 업무총괄
	한상연	처 장	’23.1.18.∼현재	광역민자철도처 소관사업 업무총괄
	황지광	부 장	`23.1.18.∼현재	강원권부 소관사업 업무총괄
지역 강원본부	양인동	본부장	‘22.1.17.∼현재	강원본부 소관사업 업무총괄
	장동삼	단 장	‘22.9.26.∼현재	강원권사업단 소관사업 업무총괄
	이민우	부 장	‘22.1.17.∼현재	토목2부 소관사업 업무총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

국토교통부
철도건설과장	오송천	담당사무관	김용래

ㅇ 공구별 업체 현황

구 분	제1공구(T/K)	제2공구	제3공구	제4공구
설계사	㈜한진중공업	㈜KRTC	㈜대한콘설탄트	㈜도화
시공사
감리사	㈜유신
구 분	제5공구	제6공구	제7공구(T/K)	제8공구
설계사	㈜동일기술공사	㈜서현	㈜한화건설	㈜유신
시공사
감리사			㈜KRTC

추진실적

- 2016. 7 : 예비타당성조사 통과(기재부, B.C 0.79,AHP=0.518)

- 2020. 3. 3. : 기본계획 고시

* 국토교통부고시 제2020-222호

- 2021. 7.    : 기타공구(6개) 노반 기본설계 완료

- 2021. 12.   : 7공구 실시설계 적격심의 및 계약체결

- 2022. 6. 2. : 춘천∼속초 1,7공구 사업실시계획 승인

* 국토교통부고시 제2022-288호

- 2022. 9.    : 1공구 실시설계 적격심의 및 계약체결