호남고속철도 사업현황

1. 개요

목포

(임성리)

익

산

43.8㎞

오

송

정

읍

광주

송정

● 신설역(2)

● 개량역(4)

■ 차량기지(1)

경부

고속철도

천안아산

대전

서울

공

주

45.7㎞

42.2㎞

50.5㎞

48.7㎞

(230.9㎞)

■

군산선

전라선

경전선

부산

서대전

논산

김제

장성

함평

무안

차량기지

기본설계(完)

호남선

182.2㎞

ㅇ 사업구간 : 오송~목포간 230.9㎞

ㅇ 사업기간 : 2006~2017년

오송~광주송정 2014년, 광주송정~목포 2017년까지 완공

ㅇ 사업비 : 기본계획('09.4.16) 11조 3,382억원/총사업비('09.10.23) 12조 1,017억원

ㅇ 효과 :  철도수송능력 향상과 빠른 교통체계 구축으로 반나절생활권 실현, 충청․호남지역의 균형발전 촉진

2. 투자계획

(단위 : 백만원)

총소요	기투자 (‘06~’08년)	2009년	2010년	2011년	12년이후
12,101,694	150,750	292,000	945,043	2,128,978	8,584,923
국고 : 6,050,847 자체 : 6,050,847	150,750 0	140,000 152,000	310,000 635,043	1,045,500 1,083,478	4,464,597 4,120,326
	기본설계 완료 노반 실시설계착수	노반실시설계완료 용지매수 노반공사착수	실시설계 (건축, 전기) 노반공사(계속)	노반공사(계속)	준 공

□ 공정 현황

		‘09년 까지	‘10년				누계			비고
			당월	금년누계
				계획	실적	대비	계획	실적	대비
계		2.6	0.70	1.70	1.71	100.6	4.20	4.21	100.2
기본/실시설계		47.2	0.68	1.08	1.02	94.4	58.77	58.72	99.9
공 사 감 리		0.6	0.56	1.82	1.83	100.5	2.59	2.60	100.4
용 지 보 상		26.1	2.73	9.79	9.79	100.0	42.36	42.36	100.0
공사	계	1.0	0.45	0.88	0.90	102.3	2.04	2.06	101.0
	노 반	1.3	0.58	1.15	1.18	102.6	2.77	2.79	100.7
	궤 도	-	-	-	-	-	-	-	-
	건 물	-	-	-	-	-	-	-	-
	전 력	-	-	-	-	-	-	-	-
	통 신	-	-	-	-	-	-	-	-
	신 호	-	-	-	-	-	-	-	-
	차량기지	-	-	-	-	-	-	-	-
차 량 구 입		-	-	-	-	-	-	-	-