보도요청일 2012.11. 8(목) 조간부터	자료배포일 2012. 11. 7(수)	총매수 2 매
	배포부서 홍보실
담당부서 기술본부 신호제어처 / 처장 윤한훈, 열차제어부장 김학렬(042-607-3192)
경부고속철도 노후 신호설비 시설개량 착수 - 철도시설공단, 총 1,095억원 투입…2014년말 완료 예정 -

□  한국철도시설공단은 경부고속철도 KTX열차 안전운행을 위하여1단계 구간(광명~동대구)의 노후 신호설비 개량공사와 2단계 구간(동대구~부산)의 신호설비 통합 감시시스템 구축사업에 총 1,095억원을 투입, ‘14년 12월 완료를 목표로 금년 11월부터 본격 추진한다고 밝혔다.

□ 철도시설공단은 경부고속철도 1단계 구간 중 1998년에 설치된 시험선 구간(천안~대전)과 2002년에 설치된 광명~동대구 구간의 신호설비의 개량시기가 도래함에 따라 궤도회로장치, 선로전환기, 안전설비(차축온도검지장치) 등을 개량하고, 경부고속철도 2단계 구간에는 신호설비 장애를 사전에 예방하고 만약에 장애가 발생하더라도 KTX열차 지연을 최소화 할 수 있도록 신속히 대응하는 통합감시시스템을 설치할 계획이다.

□ 철도시설공단은 시설개량에 사용되는 주요자재를 장비의 성능 및 품질확보를 위하여 고속철도 신호장비 제작경험이 있는 업체와 공개경쟁입찰을 통하여 계약체결을 완료하였고, 해당 공사는 지역 및 중소업체의 입찰참여기회 확대를 위해 지역 업체를 1개 이상 포함하도록 하는 ｢지역의무 공동계약｣을 적용함으로써 지역 중소기업과의 공생발전에도 기여할 예정이다.

참 고		경부고속철도 신호설비 개량사업

□ 사업개요

○ 약 도

○ 사업내용 : 경부고속철도 신호설비 개량사업

○ 전기분야 사업비 : 156,457백만원 (신호 : 109,542백만원)

□ 사업내용

(단위금액 : 백만원)

구분	건 명	대상	구간	사업기간	금액
자재 구매	선로전환기 구매	152대	경부 1단계	‘12.10～’13.12	2,895
	궤도회로장치 구매	589개소	“	‘12.10～’14.06	15,281
	역정보전송장치 구매	1개소	“	‘12.10～12	1,454
	차축온도검지장치 구매	14개소	“	‘12.10～’13.12	5,890
	통합감시시스템 구축	11개소	경부 2단계	‘12.10～’13.12	25,710
	선로변기능모듈 이중화구매	154조	“	‘12.10～’13.12	8,488
	전자연동장치 개량(미발주)	19개소	“	‘13.7～’14.12	7,839
	자동열차제어장치 개량(미발주)	2역	“	‘13.7～’14.12	31,000
공사	궤도회로장치 개량공사	1식	경부 1단계	‘12.10～’14.12	8,755
	선로전환기 철관장치 개량공사	1식	“	‘12.10～’13.12	2,230
합 계					109,542