Ⅰ. 사업개요

목포

(임성리)

익

산

43.7㎞

오

송

정

읍

광주

송정

● 신설역(1)

● 개량역(5)

■ 차량기지(1)

경부

고속철도

천안아산

대전

서울

공

주

46.0㎞

42.1㎞

50.5㎞

48.6㎞

(230.9㎞)

■

군산선

전라선

경전선

부산

서대전

논산

김제

장성

함평

무안

차량기지

타당성조사완료(‘10.12)

호남선

182.3㎞

❍ 사업내용 : 오송～목포간 230.9㎞ 신선 건설

- 오송～익산(89.7km)～광주송정(182.3km)～목포(230.9km)

- 역사 신설 및 개량 : 6개역 (오송역 호남선부분 포함)

- 광주차량기지 신설

❍ 사업비/사업기간 : 10조 6,212억원 / 2006～2017년

- (오송～광주송정)  7조 8,973억원 / 2006 ～2014년

- (광주송정～목포)  1조 9,704억원 / 2006 ～2017년

- (차량구입비)  7,535억원

＊소요시간 : 용산～목포간 1시간 46분

구 분		용산～오송	오송～광주	광주～목포	비 고
연 장		121.8km	182.3km (304.1km)	48.6km (352.7km)	오송～목포 230.9km
소요 시간	현재	39분	120분 (159분)	26분 (185분)	격역 정차 (오송,익산)
	신선	39분	54분 (93분)	13분 (106분)
	단축	-	△66분(△66분)	△13분(△79분)

(   ) : 용산기점 누계

Ⅱ. 공정추진

❍ '11.10월말 공정 : 34.4% (계획 33.5% 대비 102.6%)

❍ 월별/분야별 공정실적

- 월 별                                            (단위 : %)

구 분		‘10년까지	‘11. 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	계획	11.5	12.6	13.9	15.5	17.3	18.5	20.2	21.6	23.0	24.8	26.8	28.9	31.0
	실적	11.5	12.6	13.9	15.9	17.6	18.9	21.3	22.4	23.6	25.7	27.4	-	-
	대비	100.0	100.0	100.0	102.6	101.7	102.2	105.4	103.7	102.6	103.6	102.2	-	-
오송 ～ 광주송정	계획	13.9	16.5	19.2	20.3	21.6	23.1	25.3	27.0	28.8	31.0	33.5	36.1	39.1
	실적	13.9	16.5	19.3	20.6	22.0	23.7	26.7	28.1	29.6	32.1	34.4	-	-
	대비	100.0	100.0	100.8	101.5	102.0	102.4	105.5	104.1	102.8	103.5	102.6	-	-
광주송정～ 목포	계획	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	실적	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	대비	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 분야별(오송~광주송정)

구 분		‘10년 까지	‘11년 계획	‘11년				누계
				당월	금년누계
					계획	실적	대비	계획	실적	대비
계		13.9	39.1	2.3	19.6	20.5	104.5	33.5	34.4	102.6
설 계		62.3	71.3	1.9	8.2	7.3	89.0	70.6	69.6	98.7
감 리		8.2	18.6	0.8	8.3	8.0	96.7	16.5	16.3	98.4
용 지		66.5	80.4	0.2	11.9	16.4	138.3	78.4	82.9	105.8
공사	계	12.5	35.3	2.5	16.7	17.4	104.2	29.2	29.9	102.4
	노 반	18.6	51.9	3.8	24.5	26.3	107.3	43.1	44.9	104.2
	궤 도	2.4	6.0	-	2.3	2.2	95.0	4.6	4.6	100.0
	건 물	-	-		-	-	-	-	-	-
	전 력	0.9	3.3	0.5	1.7	0.9	50.6	2.6	1.8	67.7
	통 신	2.6	3.6	-	0.6	0.5	83.3	3.2	3.1	97.5
	신 호	0.4	2.7	-	1.5	1.6	105.8	1.9	2.0	104.5
	차량기지	-	11.7	2.0	7.0	5.6	78.9	7.0	5.6	78.9
차 량 구 입		-		-	-	-	-	-	-	-