건설공사 품질관리 지침

2010.12

국토해양부

목    차

제1장 총칙

1. 목적

2. 적용범위

3. 정의

제2장 건설공사 품질관리계획 수립

제1절 품질관리주체의 역할

4. 발주자의 역할

5. 공사감독자 또는 감리원의 역할

6 시공자의 역할

제2절 품질관리계획서 작성기준

7. 품질관리계획서의 항목

8. 건설공사의 정보

9. 현장 품질방침 및 품질목표관리

10. 책임 및 권한

11. 문서관리

12. 기록관리

13. 자원관리

14. 설계관리

15. 건설공사 수행 준비

16. 계약변경관리

17. 교육훈련관리

18. 의사소통관리

19. 기자재 구매관리

20. 지급자재의 관리

21. 하도급 관리

22.공사 관리

23. 중점 품질관리

24. 식별 및 추적관리

25. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리

26. 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리

27. 검사, 시험 및 모니터링 관리

28. 부적합 공사의 관리

29. 데이터의 분석관리

30. 시정조치 및 예방조치관리

31. 자체 품질점검관리

32. 건설공사 운영성과의 검토관리

33. 공사준공 및 인계관리

제3장 건설공사 품질시험기준

34. 품질시험기준

35. 품질시험기준의 반영 등

제4장 품질검사전문기관의 품질관리규정 수립

36. 품질관리규정의 수립

37. 품질관리규정의 관리

38. 기록유지

39. 재검토기한

제5장 부 칙

별표 및 별지서식

별표 1 : 건설공사 품질시험기준

별표 2 : 품질관리규정 작성기준

별지 1 : 품질관리계획서 검토․승인서

국토해양부 고시 제2010- 1043호

건설공사 품질관리 지침을 다음과 같이 제정합니다.

2010년 12월 27일

국토해양부장관

건설공사 품질관리 지침 고시

국토해양부고시 제2010- 1043호(2010. 12. 27제정)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 ｢건설기술관리법｣ 제24조 및 같은 법 시행령 제80조에 따른 품질관리계획 수립 및 품질시험의 기준을 정하고, 같은 법 시행령 별표 5에 따라 품질검사전문기관의 등록에 필요한 품질관리규정 수립에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 제2장 품질관리계획서 작성기준 및 제3장 품질시험기준은 「건설기술관리법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제79조에 따른 품질관리계획 등 수립대상 공사에 적용한다.

② 제4장 품질검사전문기관의 품질관리규정은 「건설기술관리법」(이하 “법”이라 한다) 제25조, 같은 법 시행령 제91조제1항에 따라 품질검사전문기관의 품질관리규정을 수립하는 데 적용한다.

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “건설공사”란 ｢건설산업기본법｣ 제2조제4호에 따른 건설공사를 말한다.

2. “발주자”란 법 제2조제5호의 발주청과 건설공사의 허가․인가․승인 등을 한 행정기관의 장, 자재에 대한 공급원 승인권한을 갖는 자 등 건설공사를 시공자에게 도급하는 자를 말한다.

3. “설계자”란 법 제2조제4호의 역무를 수행하는 자를 말한다.

4. “시공자”란 ｢건설산업기본법｣ 제2조제5호 또는 ｢주택법｣ 제9조에 따라 면허를 받거나 등록을 하고 건설업 또는 주택건설업을 영위하는 건설업자 또는 주택건설등록업자를 말한다.

5. “검사”란 측정, 시험 또는 계측 등을 활용한 관찰 및 판정에 의한 적합 여부 평가를 말한다.

6. “시험”이란 절차에 따라 하나 또는 그 이상의 특성을 결정하는 것을 말한다.

7. “측정”이란 사물의 공간적인 크기 또는 양을 조사하거나 결정하는 것을 말한다.

8. “검증”이란 규정된 요구사항이 충족되었음을 객관적인 증거의 제시를 통하여 확인하는 것을 말한다.

9. “모니터링”이란 관찰하고 감독하고 지속적으로 검토하는 행위로서, 특히 통제 또는 관리의 목적으로 주기적으로 조사하거나 측정, 시험하는 것을 말한다.

10. “건설공사 요구사항”이란 법 제24조에 따라 품질관리계획을 수립하는데 적용되는 건설공사의 목적물을 적합하게 건설하기 위한 요구 또는 기대로서, 계약 요구사항, 품질관리계획 요구사항, 발주자 요구사항, 감리자 요구사항, 법적 및 규제 요구사항 등을 말한다.

11. “보완시공”이란 의도된 용도에 쓰일 수 있도록 부적합 공사에 대해 취하는 조치를 말한다.

12. “재시공”이란 시공된 공사가 품질확보상 미흡하거나 위해를 발생시킬 수 있다고 판단된 경우 요구사항에 적합하도록 취하는 조치를 말한다.

13. “현상사용”이란 부적합 자재 또는 부적합 공사의 목적물을 사용하거나 인도하는 것을 말한다.

14. “중점 품질관리”란 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자 발생빈도가 높으며, 부적합 공사로 판명될 경우 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 소요되는 공종 또는 부위에 대한 품질관리 활동을 말한다.

15. “프로세스”란 건설공사 수행 과정에서 발생되는 다양한 종류의 업무 또는 작업의 시작과 종료에 맞물려 입력(input)을 출력(output)으로 변환시키는 상호 관련되거나 상호 작용하는 활동의 조합을 말한다.

16. “공사 관련자”란 발주자, 감리자, 설계자, 시공자, 하도급자 등 건설공사에 참여하는 모든 관련 조직을 말한다.

17. “공사 참여자”란 건설공사 현장에 직접 투입되어 시공하는 사람을 말하며, 관리자, 기능공을 포함한다.

18. “현장 품질방침”이란 해당 건설공사의 현장대리인에 의해 품질과 관련하여 공식적으로 표명된 시공자의 전반적인 의도 및 방향을 말한다.

19. “현장 품질목표”란 현장 품질방침에 근거하여 추구하거나 지향하는 품질을 말한다.

20. “품질관리규정”이란 케이에스 큐 아이에스오(KS Q ISO) 17025에 따라 시험업무처리 요령 및 인력․장비의 관리․운영에 관하여 필요한 방법 및 절차를 정한 문서를 말한다.

제2장 건설공사 품질관리계획 수립

제1절 품질관리주체의 역할

제4조(발주자의 역할) ① 발주자는 공사계약문서에 품질관리계획서의 내용, 제출시기 및 수량 등에 대한 다음 각 호의 사항을 정하여야 한다.

1. 품질관리계획서 및 관련 품질문서(해당되는 경우 절차서, 지침서를 포함한다)의 제출시기 및 수량

2. 품질관리계획서 관련 품질문서의 검토, 승인 시기

3. 하도급자의 품질관리계획 이행에 관한 시공자의 책임사항

4. 공사감독자 또는 감리원이 실시하는 품질관리계획 이행상태 확인의 시기 및 방법

5. 품질관리계획 이행의 부적합 사항의 처리 및 기록

② 발주자는 공사감독자 또는 감리원 검토결과를 확인할 뿐 아니라 품질관리계획서 내용의 적정성을 자체적으로 검토하여 시정, 조건부 승인 또는 승인 조치하고 시공자, 공사감독자 및 감리원에게 통보하여야 한다.

③ 발주자 중 발주청이 아닌 자는 시공자가 감리원의 검토를 받아 제출한 품질관리계획을 해당 건설공사의 인․허가 행정기관의 장에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

④ 발주자는 별지 제1호 서식의 품질관리계획서 검토․승인서에 따라 품질관리계획서를 승인한다.

⑤ 발주자는 시공자가 품질관리계획서를 변경하는 경우에도 승인 등의 조치를 하여야 한다.

⑥ 공동도급계약 방식으로 공사를 발주하는 경우 발주자는 공동수급체에 대한 품질관리계획 이행 요구사항을 공사계약문서에 명시하여야 한다.

⑦ 공동도급계약 방식의 공사인 경우 품질관리계획서 및 관련문서의 운영은 다음 각 호와 같이 할 수 있다.

1. 공동수급체가 통합조직을 구성하여 공사를 수행하는 경우 대표사가 통합품질관리계획을 수립, 이행할 수 있다. 이 경우 대표사는 수급인별로 품질관리계획서와 그 밖의 품질관련 문서의 준수를 위한 동의 서명을 받아야 한다. 다만, 자체 품질점검, 건설공사 운영성과의 검토 등은 수급인 각자가 별도로 수행할 필요가 없고 합동으로 실시하거나 어느 한 수급인이 통합조직에 대하여 수행할 수 있다.

2. 공동수급체가 각각의 조직별로 공사구간을 나누어 공사를 수행하는 경우는 각 수급인별로 품질관리계획을 독립적으로 수립, 이행하여야 한다.

제5조(공사감독자 또는 감리원의 역할) ① 공사감독자 또는 감리원은 시공자가 수립한 품질관리계획서의 적정여부를 별지 제1호 서식의 품질관리계획서 검토․승인서에 따라 검토하여야 한다.

② 공사감독자 또는 감리원은 품질관리계획서와 절차서, 지침서 등 이에 수반된 문서를 검토하고 검토결과를 시공자에게 통보하여야 한다.

③ 공사감독자 또는 감리원은 검토결과에 따라 시공자에게 시정 및 시정조치를 요구할 수 있으며, 조치를 요구받은 시공자는 이를 지체없이 실시하여야 한다.

④ 공사감독자 또는 감리원은 발주자가 달리 지정하지 않는 한 품질관리계획이 승인되기 전까지 시공자로 하여금 해당업무를 수행하게 하여서는 안된다.

⑤ 공사감독자 또는 감리원은 시공자가 품질관리계획서를 변경하는 경우 변경된 품질관리계획서에 대하여 제1항부터 제3항까지의 조치를 하여야 한다.

⑥ 공사감독자 또는 감리원은 「책임감리현장 참여자 업무지침서」(국토해양부 고시) 제29조에 따라 품질관리계획의 이행상태 확인을 체계적으로 수행하기 위해 다음 각 호의 사항을 포함한 이행상태 확인계획을 수립하여야 한다.

1. 점검기준, 범위, 점검자 선정을 포함한 점검계획 수립

2. 품질관리계획의 이행확인에 중점을 둔 점검표의 작성 및 점검 수행방법

3. 점검결과의 기록(품질관리계획서 관련 조항, 서류명 등 객관적인 증거의 기술 포함)

4. 필요한 경우 시정 및 시정조치의 요구, 취해진 조치결과의 검증

제6조(시공자의 역할) ① 시공자는 건설기술관리법령 및 이 지침에서 정한 바에 따라 해당 건설공사의 여건을 종합적으로 고려한 품질관리계획을 수립하고 공사감독자 또는 감리원의 검토를 받아 발주자의 승인을 받아야 한다.

② 시공자는 다음 각 호의 사항을 고려하여 품질관리계획서의 문서구성과 내용을 결정하여야 한다.

1. 건설공사의 규모 및 활동의 형태

2. 프로세스의 복잡성 및 그 상호작용

3. 조직 구성원의 학력, 교육훈련, 숙련도, 경험 등을 고려한 업무 수행능력

③ 시공자는 품질관리계획서를 변경하는 경우에도 공사감독자 또는 감리원의 검토를 받아 발주자의 승인을 받아야 한다.

제2절 품질관리계획서 작성기준

제7조(품질관리계획서의 항목) ① 품질관리계획서는 다음 각 호의 절차에 대한 사항을 포함하여야 한다.

1. 건설공사의 정보

2. 현장 품질방침 및 품질목표 관리절차

3. 책임 및 권한

4. 문서관리

5. 기록관리

6. 자원관리

7. 설계관리

8. 건설공사 수행준비

9. 계약변경관리

10. 교육훈련관리

11. 의사소통관리

12. 기자재 구매관리

13. 지급자재 관리

14. 하도급 관리

15. 공사 관리

16. 중점 품질관리

17. 식별 및 추적 관리

18. 기자재 및 공사 목적물의 보존 관리

19. 검사장비, 측정장비 및 시험장비 관리

20. 검사 및 시험, 모니터링 관리

21. 부적합 공사의 관리

22. 테이터의 분석관리

23. 시정조치 및 예방조치 관리

24. 자체 품질점검 관리

25. 건설공사 운영성과의 검토 관리

26. 공사준공 및 인계 관리

② 제1항 각 호의 사항은 제8조부터 제33조까지에 따라 작성되어야 한다.

② 해당 건설공사의 현장 특성 때문에 이 작성기준의 일부를 적용할 수 없는 경우에는 상세한 사유가 명시되어야 한다.

제8조(건설공사의 정보) 품질관리계획서는 건설공사 정보와 관련하여 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 공사명, 공사금액, 공사기간, 공사위치, 관련주체, 공종 현황, 계약 특이사항 등 계약 일반현황에 관한 요약 정보

2. 건설공사에 적용되는 프로세스 간의 상호작용에 관한 관계도(프로세스 맵 등)

제9조(현장 품질방침 및 품질목표관리) ① 시공자는 건설공사의 목적과 발주자의 기대 및 요구에 적절한 현장 품질방침 및 품질목표를 정하고 문서화하여야 한다.

② 현장 품질방침 및 품질목표관리 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 현장조직 구성원의 현장 품질방침과 품질목표의 이해

2. 품질목표 추진계획의 수립

가. 품질목표 달성을 위한 실행담당자의 지정

나. 품질목표 달성을 위한 수단, 방법 및 일정계획 수립 등

3. 품질목표 달성도의 주기적 확인

4. 그 밖에 필요한 사항

제10조(책임 및 권한) ① 시공자는 품질관리계획을 수립, 실행 및 유지할 수 있는 현장조직을 구성하여야 한다.

② 품질관리계획서에는 다음 각 호의 사항을 포함하여 단위조직 및 공사 수행 구성원의 책임과 권한이 포함되어야 한다.

1. 품질관리, 공사, 공무, 관리 등 개별 단위조직에 대한 활동의 계획, 실행 및 유지, 모니터링

2. 건설공사에 영향을 미치는 발주자, 공사감독자 또는 감리원, 하도급자 등 모든 조직과의 의사소통, 그리고 공사 관련자간 공유영역에서 일어나는 문제의 해결

3. 내부 및 외부 점검(감사, 품질관리 적정성 확인 등)결과

4. 시정조치의 관리

5. 그 밖에 필요한 사항

제11조(문서관리) ① 시공자는 건설공사 요구사항을 충족시키기 위하여 다음 각 호의 문서를 관리하여야 한다.

1. 품질관리계획서, 시공계획서, 작업절차서 등 내부생성 문서

2. 계약문서, 설계도서, 법규, 한국산업규격, 기술시방 등 외부출처 문서

② 문서를 관리하기 위한 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 문서의 작성, 검토, 승인, 등록, 배포, 개정 및 폐기방법

2. 문서의 유효본 검색 및 활용 가능성

3. 필요한 경우 인터넷 등의 매체를 통한 전자문서 관리

4. 보유하고 있는 구문서의 식별

5. 그 밖에 필요한 사항

제12조(기록관리) ① 시공자는 품질관리계획서 및 공사 목적물이 건설공사 요구사항에 적합하다는 증거를 제공하기 위하여 기록을 작성하고 유지하여야 한다.

② 기록관리 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 법적 및 규제 요구사항을 충족하는 기록의 보유기간 설정

2. 기록의 식별, 보관, 보호, 처분, 기밀유지에 필요한 관리 방법

3. 기록의 열람 및 검색 방법

4. 해당되는 경우 인터넷 등의 매체를 통한 전자기록 관리

5. 공사 관련자에게 제공하여야 할 기록의 종류, 시기 및 방법

6. 그 밖에 필요한 사항

제13조(자원관리) ① 시공자는 품질관리계획서 및 건설공사 요구사항을 충족시키기 위하여 필요한 자원을 확보하여야 한다.

② 자원관리 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 인적자원의 관리

가. 해당 업무수행에 요구되는 자격기준(학력, 교육훈련, 숙련도, 경험)의 결정 및 관리에 관한 사항

나. 자격이 부여된 적격한 인원의 배치에 관한 사항

다. 그 밖에 필요한 사항

2. 물적자원의 관리

가. 건설공사의 성공적인 수행을 위한 기반구조와 작업환경의 확보 및 유지관리에 관한 사항

나. 필요한 성능의 지속적인 유지관리 사항

다. 그 밖에 필요한 사항

제14조(설계관리) ① 시공자는 설계시공일괄입찰 등의 건설공사에 대해 설계책임이 있는 경우에 한하여 설계를 관리하여야 한다.

② 설계관리 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 설계계획의 수립 및 관리

2. 설계입력기준의 결정 및 문서화

3. 설계출력물의 산출

4. 설계검토의 수행

5. 설계검증의 수행

6. 설계타당성확인의 수행

7. 그 밖에 필요한 사항

제15조(건설공사 수행 준비) ① 시공자는 계약문서, 설계도서, 관련된 법규정 및 규격 등에 따른 건설공사 요구사항을 검토하고 건설공사 수행을 준비하여야 한다.

② 건설공사 수행 준비를 위한 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 건설공사 요구사항의 검토

가. 검토시기, 방법 및 책임자 지정

나. 상충되거나 모호한 요구사항, 현장 실정과 부합되지 않는 요구사항의 해결방법

다. 그 밖에 필요한 사항

2. 사전 준비

가. 건설공사와 관련된 인허가계획 및 이행

나. 건설공사와 관련된 표지판 설치계획 및 이행

다. 측량기준점 보호 및 확인측량(필요한 경우에만 해당한다)

라. 가설시설물 설치계획 및 이행

마. 현지여건 조사

바. 그 밖에 필요한 사항

제16조(계약변경관리) ① 시공자는 설계변경을 포함한 계약변경 사항을 관리하여야 한다.

② 계약변경관리 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 계약변경의 요청 및 처리방법

2. 관련 문서의 수정과 관련 인원의 변경 요구사항 인식 방법

3. 그 밖에 필요한 사항

제17조(교육훈련관리) ① 시공자는 건설공사를 수행하는 공사 참여자에 대하여 다음 각 호의 사항을 포함한 교육훈련을 제공하여야 한다.

1. 건설공사 수행과 관련된 법령 및 품질관리계획의 요구사항 교육

2. 작업방법 및 절차, 검사 및 시험방법, 측량기법, 적용되는 신기술 또는 신공법 교육

3. 품질관리, 안전관리 및 환경관리 교육

4. 견실시공 의식고취

5. 그 밖에 필요한 사항

② 교육훈련관리 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 교육훈련의 필요성 파악

2. 자체교육, 위탁교육 등 교육훈련계획의 수립

3. 교육훈련의 실시(교육훈련계획에 반영되지 않은 비정기 교육훈련을 포함한다)

4. 교육훈련결과의 보고

5. 교육훈련의 효과성 평가

6. 그 밖에 필요한 사항

제18조(의사소통관리) ① 시공자는 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영과 관련하여 다음 각 호의 사항을 위한 내부 및 외부에서의 효과적인 의사소통방안을 결정하여 실행하여야 한다.

1. 건설공사와 관련된 요구사항 및 정보의 교환

2. 공사 관계자간의 조직적 및 기술적 연계성

3. 부적합 사항, 부적합 공사 등 당면한 문제의 해결

4. 민원, 발주자, 공사감독자 또는 감리원을 포함한 건설공사 관계자의 불평 해결, 이에 대한 후속활동

5. 비상시 대비 및 대응

6. 공사관련자 회의체 구성

7. 그 밖에 필요한 사항

② 의사소통관리 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 내부 및 외부 관계자로부터의 의견 접수 방법

2. 의견의 검토방법 및 관련 조직에 전달하는 방법

3. 결과의 문서화 및 회신 방법

4. 그 밖에 필요한 사항

제19조(기자재 구매관리) ① 시공자는 품질 요구사항을 충족하는 주요 기자재가 건설공사 진행에 따라 적기에 투입되도록 관리하여야 한다.

② 기자재 구매관리 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 기자재 수급계획 수립

2. 구매할 기자재명, 규격, 납기, 검사기준 및 관련 구매정보를 포함한 발주서 작성 방법

3. 발주 방법

4. 구매한 기자재의 검사 및 시험, 또는 검증, 유지관리 방법

5. 부적합 기자재의 처리 방법

6. 공장검사가 필요한 제작품의 경우, 검증계획 및 출하방법을 발주서에 명시

7. 그 밖에 필요한 사항

제20조(지급자재의 관리) ① 시공자는 건설공사에 투입되는 지급자재가 있는 경우 지급자재가 건설공사 진행에 따라 적기에 투입되도록 관리하여야 한다.

② 지급자재관리 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 지급자재의 파악 및 수급계획

2. 지급자재의 검사 및 시험 방법과 검증결과 부적합한 경우 처리하기 위한 방법

3. 보관시 지급자재가 손상, 분실되거나 사용하기에 부적절한 것으로 판명된 경우, 보고를 포함한 지급자재의 처리 방법

4. 지급자재의 입체 또는 대체 사용이 필요한 경우, 그 처리방법

5. 잉여지급자재의 처리방법

6. 그 밖에 필요한 사항

제21조(하도급 관리) ① 시공자는 공사 목적물의 건설공사 요구사항에 대한 적합성에 영향을 미치는 공종을 하도급 처리할 경우, 하도급 공종의 품질을 보장하기 위한 관리를 하여야 한다.

② 하도급 공종을 관리하기 위한 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 하도급 계획 수립

2. 하도급 계약 요구사항을 충족시킬 능력을 근거로 한 하도급업체의 평가 및 선정

3. 하도급 계약과 관련된 요구사항의 결정(요구되는 절차, 사용되는 기자재와 장비에 관련된 보고 및 승인에 대한 사항, 인력의 자격 인정에 대한 사항 및 그 밖의 필요한 사항)

4. 하도급 계약체결 방법

5. 하도급자에게 제공하는 교육훈련, 품질관련 절차서, 기자재, 정보 등 하도급자에 대한 지원업무 범위

6. 하도급된 공종에 대한 검사 및 시험, 검증과 모니터링 방법

7. 필요한 기록의 종류, 기록의 제출 시기 및 방법

8. 그 밖에 필요한 사항

제22조(공사 관리) ① 시공자는 공사 목적물이 건설공사 요구사항을 충족하도록 건설공사 전반에 대해 관리하여야 한다.

② 건설공사관리 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 시공관리(시공계획을 포함한다)

2. 필요한 경우 작업지침의 수립

3. 공정관리

4. 공사진도관리(필요한 경우 부진공정 만회대책 및 수정공정계획을 포함한다)

5. 안전관리 및 환경관리

6. 시공상세도, 준공도의 관리

7. 그 밖에 필요한 사항

제23조(중점 품질관리) ① 시공자는 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자 발생빈도가 높으며, 부적합 공사로 판명될 경우 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 소요되는 공종 또는 부위에 대하여 중점 품질관리를 하여야 한다.

② 중점 품질관리 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 중점 품질관리 대상의 결정

2. 작업에 이용되는 장비에 대한 기준 및 승인

3. 작업자에 대한 자격기준 및 자격인정

4. 특정방법, 절차의 사용 및 모니터링

5. 그 밖에 필요한 사항

제24조(식별 및 추적관리) ① 시공자는 건설공사 수행의 모든 단계에서 기자재와 공사 목적물에 대한 식별 및 추적이 가능하도록 관리하여야 한다.

② 식별 및 추적관리 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 식별 대상의 결정 및 식별방법

2. 추적 요구사항을 고려한 추적 대상의 파악, 추적의 범위, 정도 및 방법

3. 기자재와 공사 목적물에 대한 검사 및 시험 상태의 식별방법

4. 그 밖에 필요한 사항

제25조(기자재 및 공사 목적물의 보존관리) ① 시공자는 건설공사를 수행할 때부터 공사 목적물을 인계할 때까지 기자재 및 공사 목적물이 분실, 손상 또는 열화되지 않도록 보존관리하여야 한다.

② 기자재 및 공사 목적물 보존관리 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 기자재의 운반 및 투입에 있어 필요한 특별한 취급방법

2. 기자재의 고유한 특성의 유지를 위한 보관장소 및 보관방법, 반입과 반출방법

3. 공사 목적물의 인계전까지 품질보호를 위한 방안

4. 화재 및 보안관리 사항

5. 그 밖에 필요한 사항

제26조(검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리) ① 시공자는 공사 목적물이건설공사 요구사항에 적합하다는 것을 실증하기 위해 필요한 검사장비, 측정장비 및 시험장비를 관리하여야 한다.

② 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 필요한 검사 및 시험, 모니터링에 사용될 장비의 결정 및 확보에 관한 사항

2. 규정된 주기에 따른 검교정 또는 사용전 검교정 실시, 교정성적서의 검토와 사용여부의 판단, 검교정 상태의 식별 표시 방법

3. 고유한 식별, 취급, 유지보전 및 보관방법

4. 성능저하를 발견하기 위한 적정한 점검주기, 점검기준 및 점검방법

5. 장비가 장비의 관리기준에서 벗어난 것으로 판명된 경우 이전의 검사 및 시험과 모니터링 결과에 대한 유효성 평가 및 필요한 경우 적절한 조치 방법

6. 그 밖에 필요한 사항

제27조(검사, 시험 및 모니터링 관리) ① 시공자는 공사 목적물이 건설공사 요구사항을 충족하고 있다는 것을 검증하기 위하여 투입되는 자재, 시공공정 및 공사 목적물과 관련된 특성을 검사, 시험 및 모니터링하여야 한다.

② 검사, 시험 및 모니터링 관리 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 품질시험계획의 수립

2. 적절한 공정단계에서 검사 및 시험 계획의 수립

3. 각 단계에서의 검사 및 시험 항목, 합격판정기준, 빈도, 사용되는 장비 및 기법, 책임자 역할

4. 검증시기, 장소 및 방법

5. 발주자 또는 감리자의 입회시기, 방법 등(필요한 경우에만 해당한다)

6. 검사 및 시험, 모니터링의 실시 및 결과 보고 방법

7. 그 밖에 필요한 사항

제28조(부적합 공사의 관리) ① 시공자는 의도하지 않은 자재의 사용이나 의도하지 않은 후속공정의 진행 및 공사 목적물의 인계를 방지하기 위하여 품질기준에 적합하지 않은 부적합 공사를 관리하여야 한다.

② 부적합 공사의 관리 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 부적합 공사의 표식

2. 부적합 공사의 상태에 대한 문서화

3. 현상사용, 보완시공 또는 재시공 등 부적합 공사에 대한 조치 방법

4. 현상사용시 발주자, 공사감독자 또는 감리원 등 관련된 권한을 가진 자의 승인 방법

5. 보완시공 및 재시공시 품질 요구사항에 따른 재검사의 실시 방법

6. 그 밖에 필요한 사항

제29조(데이터의 분석관리) ① 시공자는 품질관리계획의 적절성 및 효과성을 실증하고 품질관리계획을 지속적으로 개선하기 위하여 필요한 데이터를 선정하여 분석하고 활용하여야 한다.

② 데이터의 분석관리 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 건설공사 수행과 관련된 발주자와 감리자의 만족도 조사

2. 주요자재의 품질경향

3. 부적합 공사의 발생 빈도 및 특성

4. 자체점검 및 품질관리 적정성 확인 등 외부감사 결과 활용법

5. 그 밖에 필요한 사항

제30조(시정조치 및 예방조치관리) ① 시공자는 건설공사 요구사항에 대한 실제 또는 잠재적인 부적합을 발견한 경우, 발생 또는 재발방지를 목적으로 부적합 사항의 원인을 제거하기 위한 조치를 취하여야 한다.

② 시정조치 및 예방조치관리 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 시정조치의 경우, 부적합 공사, 발주자와 감리자의 불만 등 부적합 사항 검토

2. 실제 또는 잠재적인 부적합의 원인 결정

3. 부적합의 발생 또는 재발을 방지하기 위한 조치의 필요성 평가 방법

4. 필요한 조치의 결정 및 실행

5. 취해진 조치의 검토

6. 그 밖에 필요한 사항

제31조(자체 품질점검관리) ① 시공자는 품질관리계획의 적합성, 이행성, 효과성을 결정하기 위하여 년 1회 이상 건설공사 수행에 대한 자체 품질점검을 수행하여야 한다.

② 자체 품질점검 관리 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 점검기준, 범위, 주기, 점검자 선정을 포함한 점검 계획의 수립

2. 점검 수행방법 및 점검결과 보고

3. 필요한 경우 부적합 사항의 시정조치 수행

4. 취해진 후속조치의 검증 및 검증결과의 보고

5. 그 밖에 필요한 사항

제32조(건설공사 운영성과의 검토관리) ① 시공자는 품질관리계획의 적절성, 충족성 및 효과성을 실증하고 건설공사 운영과 관련된 개선사항의 결정과 조치를 위하여 년 1회 이상 건설공사 운영성과를 검토하여야 한다.

② 건설공사 운영성과의 검토 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 현장 품질방침 및 품질목표의 관리상태

2. 내부 및 감사, 품질관리 적정성 확인 등 외부 점검 결과

3. 부적합 공사의 발생 빈도 및 특성

4. 민원 및 발주자 불만 사항

5. 시정조치 및 예방조치 상태

6. 건설공사 수행에 영향을 줄 수 있는 변경사항

7. 문제점, 애로사항의 개선을 위한 제안

8. 그 밖에 필요한 사항

제33조(공사준공 및 인계관리) ① 시공자는 품질관리계획에 따라 공사 목적물이 완성되고 모든 검증활동이 만족스럽게 완료된 경우, 준공 및 검사를 위해 필요한 서류를 파악, 확보하여 준공검사를 신청하여야 하며, 공사준공시 완성된 시설물과 공사관련 문서 및 기록의 인계를 위한 준비를 하여야 한다.

② 공사준공 및 인계관리 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 공사준공의 관리

가. 필요시 시운전을 위한 계획 및 시운전 절차 수립

나. 준공검사의 신청

다. 부적합공사에 대한 처리(해당하는 경우에 한한다)

라. 준공도면의 검토 및 제출

마. 준공표지의 설치

바. 그 밖에 필요한 사항

2. 시설물 및 공사관련 문서 및 기록의 인계 관리

가. 시설물 인계 계획의 수립

나. 본사로 이관될 현장문서 및 기록의 파악 및 인계

다. 감리자 또는 발주자에게 인계할 현장문서 및 기록의 파악 및 인계

라. 그 밖에 필요한 사항

제3장 건설공사 품질시험기준

제34조(품질시험기준) ① 건설공사의 종류별, 공종별 시험종목․방법 및 빈도 등 건설공사 품질시험기준은 별표 1과 같다.

② 별표 1의 건설공사 품질시험기준에 명시되지 아니한 공종이나 자재에 대해서는 시방서 등 설계도서에 제시된 시험종목․방법 및 빈도에 따른다.

③ 발주자가 공사의 종류․규모 및 중요성, 현지실정 등을 감안하여  특히 필요하다고 인정하면 별표 1의 건설공사 품질시험기준의 시험빈도를 조정할 수 있다.

제35조(품질시험기준의 반영 등) ① 발주자는 ｢산업표준화법｣에 따른 한국산업규격, 법 제34조제1항 각 호에 따른 설계 및 시공기준과 별표 1의 건설공사 품질시험기준을 검토하여 설계도서에 반영하여야 한다.

② 발주자는 ｢산업표준화법｣에 따른 한국산업규격, 법 제34조제1항 각 호에 따른 설계 및 시공기준과 별표 1의 건설공사 품질시험기준이 각기 다른 경우 공사의 종류, 구조물의 특성 등을 감안하여 적합한 기준을 선정하여 설계도서에 반영하여야 한다.

③ 신공법이나 신기술의 도입 등으로 국내 시험방법이 없는 경우 및 품질검사전문기관의 시험장비 기준상 시험이 곤란한 경우 등은 발주자가 설계자와 협의하여 품질을 확인할 수 있는 방법을 시방서에 명기하여야 하며, 시방서에 따라 품질을 확인하는 경우 법 제24조제2항에 따라 시험한 것으로 본다.

제4장 품질검사전문기관의 품질관리규정 수립

제36조(품질관리규정의 수립) ① 품질검사전문기관은 영 제91조제1항에 따른 요건을 만족하기 위하여 별표 2에 따라 품질관리규정을 수립하여야 한다.

② 품질검사전문기관은 케이에스 큐 아이에스오(KS Q ISO) 17025의 요구사항에 따라 품질관리규정을 작성할 수 있으며, 이 경우 제1항에 따른 품질관리규정을 작성한 것으로 본다.

제37조(품질관리규정의 관리) 품질검사전문기관은 제36조에 따라 작성한 품질관리규정이 계속 실행되고 개선할 사항이 있는 지를 확인하기 위하여 매년 내부심사와 경영검토를 하여야 한다.

제38조(기록유지) 품질검사전문기관은 제36조에 따라 수립한 품질관리규정을 실행한 증거를 기록하여 유지하여야 한다.

제39조(재검토기한)「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년 12월 31일까지로 한다.

부     칙

제1조(시행일) 이 지침은 2011년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 폐지) 건설공사 품질시험기준(국토해양부 고시 제2009-780호)은 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 지침 시행 이전에 품질관리계획을 수립하였거나 건설공사 품질시험기준을 적용한 건설공사는 기존의 규정을 적용한다.

【별표1】

건설공사 품질시험기준(시행령 제80조제2항 관련)

1. 공 통

가. 토공사 및 기초공사

종별		시험종목			시험방법	시험빈도	비고
성토용 흙		함수비			KS F 2306	·토취장마다 ·재질변화시마다
		입도			KS F 2302
		세립토 비율			KS F 2309
		밀 도			KS F 2308
		액성한계·소성한계			KS F 2303
		노상토지지력비(CBR)			KS F 2320
		다짐			KS F 2312
		유기물 함량			KS F 2104	·필요시
		토질조사			보링 등
		투수			KS F 2322	·토취장마다 ·재질변화시마다	·흙댐, 용수로, 배수로용 일반성토 및 표토 ·공종에 따라
		직접전단			KS F 2343
		3축압축			KS F 2346
터파기		토질조사			보링 등	·필요시
		지지력	확대기초		KS F 2444	·필요시
			말뚝 기초	정재하	KS F 2445
				동재하	KS F 2591
지반조사 (연약지반등)		토질조사			보링 등	·1개지구마다 3개소 이상
		함수비			KS F 2306
		입도			KS F 2302
		밀 도			KS F 2308
		액성한계·소성한계			KS F 2303
		세립토 비율			KS F 2309
		흙의 압밀시험			KS F 2316	·보링개소마다
		1축 압축강도			KS F 2314
		3축 압축시험			KS F 2346
		표준관입시험			KS F 2307
		흙의 투수시험			KS F 2322	·필요시
		점성토의 현장베인전단시험			KS F 2342
		압밀배수조건하의 직접전단시험			KS F 2343
		동적콘관입시험			KS F 2592
		유기물 함량			KS F 2104
되메우기 및 구조물 뒷채움		다짐			KS F 2312	·재질 변화시마다
		현장밀도			KS F 2311	·독립구조물 : 개소별 3층마다 ·연속구조물 : 3층마다, 50미터마다 ·관로매설물 : 3층마다, 100미터마다
		평판재하			KS F 2310	·현장밀도시험불가능시
		입도			KS F 2302	·토질변화시마다
		함수비			KS F 2306 또는급속함수량 측정방법	·현장밀도시험의 빈도
말뚝	콘크리트 널말뚝 (KS F 4208)	겉모양 및 모양			KS F 4208	·제조회사마다 ·1,000개 마다
		치수
		굽힘강도
	원심력 철근 콘크리트 말뚝 (KS F 4301)	겉모양 및 모양			KS F 4301	·제조회사마다 ·200개 마다
		치수
		몸체 및 이음부의 휨강도
		철근의 배치
	프리텐션 방식 원심력PC 말뚝 (KS F 4303)	겉모양 및 모양			KS F 4303	·제조회사마다 ·200개 마다
		치수
		몸체 및 이음부의 휨강도
		PC강재 및 철근배치
	프리텐션방식 원심력고강도 콘크리트말뚝 (KS F 4306)	겉모양 및 모양			KS F 4306	·제조회사마다 ·200개 마다
		치수
		몸체 및 이음부의 휨강도
		몸체의 축력 휨강도
		몸체의 전단 강도
		PC강재 및 철근 배치
	프리텐션 방식 진동PC말뚝 (KS F 4307)	겉모양 및 모양			KS F 4307	·제조회사마다 ·200개마다
		치수
		몸체 및 이음부의 휨강도
		PC강재 및 철근 배치
	강관말뚝 (KS F 4602)	화학성분			KS F 4602	·제조회사마다 ·200개마다
		모양,치수,질량
		인장시험			KS B 0802
		편평시험			KS F 4602
		용접부의 비파괴검사			KS B 0845 또는 KS B 0817	·10이음당 1회
	H형강 말뚝 (KS F 4603)	화학성분			KS F 4603	·제조회사마다 ·200개마다
		탄소당량
		항복점 또는 항복강도,인장강도 및 연신율			KS B 0802
		샤르피 흡수에너지			KS B 0810
		모양,치수,질량			KS F 4603
	열간 압연강 널말뚝 (KS F 4604)	화학성분			KS F 4604	·제조회사마다 ·1,000개 마다
		항복점 또는 내력,인장강도 및 연신율			KS B 0802
		이음인장강도(직선형 강 널말뚝)
		모양,치수, 단위질량			KS F 4604
	용접용 열간 압연강 널말뚝 (KS F 4606)	화학성분			KS F 4606	·제조회사마다 ·1,000개 마다
		탄소당량
		항복점 또는 내력,인장강도 및 연신율			KS B 0802
		이음인장강도(직선형 강 널말뚝)
		샤르피 흡수에너지			KS B 0810
		모양,치수,단위질량			KS F 4606
샌드매트 및 샌드드레인용 모래		투수계수			KS F 2322	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다	D15, D85는 입경가적곡선에서 통과백분율이 15%, 85%에 해당되는 입경을 말함.
		0.08mm 통과량			KS F 2502
		D15			KS F 2502
		D85			KS F 2502
케이슨 채움재용 철강슬래그 (KS F 2579)		겉모양			KS F 2579	· 제조회사별 · 케이슨 1개마다
		발색판정(고로슬래그 사용시)			KS F 2535
		수침팽창비(제강슬래그 사용시)			KS F 2580
		입도			KS F 2502
		표건밀도			KS F 2503
		단위용적질량			KS F 2505
		수중단위용적질량

나. 철근콘크리트공사

종별	시험종목						시험방법	시험빈도	비고
콘크리트용 골재 (KS F 2526)	절대 건조 밀도 및 흡수율						KS F 2503, 2504	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다
	입도, 조립률						KS F 2502,2526
	0.08mm 체 통과량						KS F 2511
	잔골재의 유기 불순물						KS F 2510
	점토 덩어리						KS F 2512
	굵은 골재의 마모율						KS F 2508
	알칼리 골재 반응 시험						KS F 2545 또는 KS F 2546	·골재원마다 ·6개월 1회 이상
	석탄 및 갈탄 함유량						KS F 2513	·골재원마다 ·1년 1회 이상
	안정성						KS F 2507
	염화물 함유량						KS F 2515	·공급회사별 ·1일 3회이상	바다모래인 경우
	잔골재의 표면수량						KS F 2509	·1일 1회이상
콘크리트용 부순골재 (KS F 2527)	절대 건조 밀도 및 흡수율						KS F 2503, 2504	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다
	입도, 조립률						KS F 2502,2527
	0.08mm 체 통과량						KS F 2511
	입자모양판정 실적률						KS F 2505
	굵은 골재의 마모율						KS F 2508
	알칼리 골재 반응						KS F 2545 또는 KS F 2546	·골재원마다 ·6개월 1회 이상
	안정성						KS F 2507	·골재원마다 ·1년 1회 이상
콘크리트용 순환골재 (KS F 2573)	절대 건조 밀도 및 흡수율						KS F 2503, 2504	·골재원(순환골재 제조전의 폐콘크리트)마다 ·1,000세제곱미터마다
	입도						KS F 2502
	0.08mm 체 통과량						KS F 2511
	입자모양판정 실적률						KS F 2505
	굵은 골재의 마모율						KS F 2508
	점토덩어리량						KS F 2512
	이물질 함유량					유기이물질	KS F 2576
						무기이물질
	알칼리 골재 반응						KS F 2545 또는 KS F 2546	·골재원마다 ·6개월 1회 이상
	굵은골재의 안정성						KS F 2507
콘크리트용 고로슬래그 골재 (KS F 2544)	화학분석						KS F 2544	·제조회사별 ·1,000세제곱미터마다
	절대 건조 밀도 및 흡수율						KS F 2503,2544
	단위용적질량						KS F 2505
	수중침지						KS F 2544
	자외선(360.nm) 조사						KS F 2544
	입도						KS F 2502
콘크리트용 동(銅)슬래그 골재 (KS F 2543)	산화칼슘(CaO)						KS M 0028 또는 KS M 0017	·제조회사별 ·1,000세제곱미터마다
	황(S)						KS E 3909, KS M 0028 또는 KS M 0017
	삼산화황(SO3)						KS F 2544
	모든 철(FeO)						KS F 2544, KS M 0028 또는 KS M 0017
	염화물량(NaCl)						KS F 2515
	절대 건조 밀도 및 흡수율						KS F 2504
	단위용적질량						KS F 2505
	입도 시험						KS F 2502
	알칼리실리카 반응						KS F 2545,2546	·골재원마다 ·6개월 1회 이상
콘크리트용 연슬래그 골재 (KS F 2583)	유해물질 용출량						폐기물공정시험법(폐기물관리법)	·제조회사별 ·1,000세제곱미터마다
	산화칼슘(CaO)						KS M 0028 또는 KS M 0017
	황(S)						KS E 3909, KS M 0028 또는 KS M 0017
	삼산화황(SO3)						KS F 2544
	철(FeO)						KS F 2544, KS M 0028 또는 KS M 0017
	염화물량(NaCl)						KS F 2515
	절건 밀도 및 흡수율						KS F 2504
	단위용적질량						KS F 2505
	입도						KS F 2505
콘크리트용 페로니켈 슬래그 잔골재 (KS F 2790)	산화칼슘(CaO)						KS M 0028 또는 KS M 0017 또는 KS L 3128	·제조회사별 ·1,000세제곱미터마다
	산화마그네슘(MgO)						KS F 4571
	황(S)						KS E 3909, KS M 0028 또는 KS M 0017
	모든 철(FeO)						KS F 2544, KS M 0028 또는 KS M 0017
	금속 철(Fe)						KS F 2568
	절대건조밀도 및 흡수율						KS F 2504
	단위용적질량						KS F 2505
	입도						KS F 2502
	알칼리 골재 반응						KS F 2545, 2546	·골재원마다 ·6개월 1회 이상
콘크리트용 전기로 산화 슬래그 잔골재 (KS F 4571)	화학 분석						KS F 4571	·제조회사별 ·1,000세제곱미터마다
	절건 밀도 및 흡수율						KS F 2504
	단위용적질량						KS F 2505
	입도						KS F 2502
	알칼리 골재 반응						KS F 2545,2546	·골재원마다 ·6개월 1회 이상
프리캐스트 콘크리트용 바텀애시 골재 (KS F 4570)	삼산화황(SO3)						KS F 2544	·제조회사별 ·1,000세제곱미터마다
	염화물량(NaCl 환산량)						KS F 2515
	점토덩어리						KS F 2512
	연한 석편						KS F 2516
	강열감량						KS L 5405
	유기불순물						KS F 2510
	절건밀도, 흡수율					굵은골재	KS F 2503
						잔골재	KS F 2504
	마모율						KS F 2508
	입도 및 조립률						KS F 2502
구조용 경량골재 (KS F 2534)	흡수율						KS F 2529, 2533	·1일 1회 이상
	굵은 골재의 부립율						KS F 2531	·제조회사별 ·1,000세제곱미터마다
	입도, 조립률						KS F 2502,2534
	강열 감량						KS L 5405
	단위 용적 질량						KS F 2505
	점토 덩어리						KS F 2512
	유기 불순물						KS F 2510
	얼룩						KS F 2468
	염화물량						KS F 2515
	안전성						KS F 2507
	콘크리트	압축,인장강도					KS F 2534
		단위용적질량					KS F 2462, 2534
		건조수축					KS F 2424, 2534
		팝아웃					KS F 2534
		동결융해시험					KS F 2456	필요시
도자기질 타일시멘트 (KS L 1592)	위치교정도						KS L 1592	·제조회사별 ·300톤마다 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	개방시간
	압축강도
	흡수율
	전단접착강도
	길이변화율
	보수율
	실내공기 오염물질 방출량 (총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)						KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험기준 (환경부고시)	·필요시	실내에 시공되는 타일 시멘트 2종에 한함.
포틀랜드 시멘트 (KS L 5201)	화학성분						KS L 5120	·제조회사별 ·300톤마다 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때	수화열 의 경우 1,3,5종은 제외
	분말도						KS L 5106
	안정도						KS L 5107
	응결 시간						KS L 5108
	압축강도						KS L 5105
	수화열						KS L 5121
백색 포틀랜드 시멘트 (KS L 5204)	화학분석						KS L 5120	·제조회사별 ·300톤마다 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	분말도						KS L 5106
	안정도						KS L 5107
	응결시간						KS L 5108
	압축강도						KS L ISO 679
	백색도						KS L 5113
고로 슬래그 시멘트 (KS L 5210)	화학 분석						KS L 5120	·제조회사별 ·300톤마다 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	분말도						KS L 5106
	안정도						KS L 5107
	응결시간						KS L 5108
	압축강도						KS L ISO 679
메이슨리 시멘트 (KS L 5219)	분말도						KS L 5112	·제조회사별 ·300톤마다 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	안정도						KS L 5107
	응결시간						KS L ISO 5108
	압축강도						KS L 5219
	모르타르 공기량
	보수성
	오염
플라이애시 시멘트 (KS L 5211)	비표면적						KS L 5106	·제조회사별 ·300톤마다 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	응결						KS L ISO 9597
	안정도						KS L 5107또는 KS L ISO 9597
	압축 강도						KS L ISO 679
	화학성분						KS L 5120
포틀랜드 포졸란 시멘트 (KS L 5401)	화학분석						KS L 5120	·제조회사별 ·300톤마다 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	비표면적						KS L 5106
	안정도						KS L 5107
	응결시간						KS L 5108
	압축강도						KS L ISO 679
물 (수질검사)	현탁 물질의 양						KS F 4009 부속서 1,2	·음용수가 아닌 경우 ·취수원이 달라질 때마다 ·수질변화시	상수돗물 이외의 물
	용해성 증발 잔류물의 양
	염소이온량
	시멘트 응결시간의 차
	모르타르의 압축강도비
	염소이온량						KS F 4009 부속서 1,2		회수수
	시멘트 응결시간의 차
	모르타르의 압축강도비
	슬러지수의 농도
콘크리트용 화학혼화제 (KS F 2560)	감수율						KS F 2560	·제조회사별 ·제품규격별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다	동결융해시험 및 길이변화시 험은 필요시
	블리딩양의 비						KS F 2414
	응결시간의 차						KS F 2560
	압축강도의 비						KS F 2405
	길이변화비						KS F 2424
	동결융해에 대한 저항성						KS F 2456
	경시변화량						KS F 2560
	전체 알칼리량						KS I 3206 또는 KS F 2560
	적외선 흡수스펙트럼						KS M 0024
철근콘크리트용 방청제 (KS F 2561)	부식상황						KS F 2561	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	방청률
	콘크리트의 응결시간차
	콘크리트의 압축강도비
콘크리트 양생용 액상피막 형성제 (KS F 2540)	피막의 성질						KS F 2540	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	컨시스턴시
	저장안정도
	건조시간
	습기유지
콘크리트용 팽창재 (KS F 2562)	산화마그네슘, 강열감량						KS L 5120	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	비표면적						KS L 5207
	1.2mm체 잔류율						KS F 2562
	응결						KS L 5207
	팽창성(길이변화율)						KS F 2562
	압축강도						KS F 2562
콘크리트 혼입용 방수재 (KS F 4926)	응결 시간 차						KS F 4926	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	경시변화에 따른 공기량변화
	길이 변화율
	동결 융해에 대한 저항성
	탄산화 깊이비
	압축 강도비
	물흡수 계수비
	투수비
	염소이온 침투깊이
숏크리트용 급결제 (KS F 2782)	압축강도						KS F 2782	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	응결시간
콘크리트용 강섬유 (KS F 2564)	치수(형상비, 허용오차)						KS F 2564	·제조회사별 ·제품규격별
	겉모양
	인장강도						KS F 2565
	분산성						KS F 2564
	굽힘정도
플라이 애시 (KS L 5405)	이산화규소						KS L 5405	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	수분
	강열 감량
	밀도						KS L 5110
	분말도						KS L 5405
	플로값 비
	활성도 지수
콘크리트용 고로슬래그 미분말 (KS F 2563)	밀도						KS L 5110	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	비표면적						KS L 5106
	활성도 지수						KS F 2563 부속서 A
	플로값 비
	산화마그네슘(MgO)						KS L 5120
	삼산화황 정량방법(SO3)
	강열 감량
	염화물 이온						KS F 2515
콘크리트용 실리카 퓸 (KS F 2567)	비표면적						KS A 0094	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	활성도지수						KS F 2567
	이산화규소(SiO2)						KS L 5120
	산화마그네슘(MgO)
	삼산화황(SO3)
	염화물 이온
	강열 감량
	45μｍ체에 남은 양						KS L 5112
굳지 아니한 콘크리트(레미콘포함)	배합설계						콘크리트표준시방서	·재료가 다른 각 배합마다
	현장배합수정							·작업개시전 1회
	온도						온도계에 의함	·150세제곱미터마다	댐의 경우
	슬럼프 또는 슬럼프플로						KS F 2402 또는 KS F 2594	·배합이 다를 때마다 ·콘크리트 1일 타설량이 150세제곱미터 미만인 경우 : 1일 타설량마다 ·콘크리트 1일 타설량이 150세제곱미터 이상인 경우 : 150세제곱미터마다
	공기량						KS F 2421 또는 KS F 2409 또는 KS F 2449
	용적						KS F 4009
	염화물 함유량						KS F 4009 부속서1
	단위수량						한국콘크리트학회 제규격(KCI-RM101)	·필요시	정전용량법 또는 단위용적질량법 또는 고주파가열법
	압축 강도						KS F 2403, KS F 2405	·배합이 다를 때마다 ·1일 타설량마다 ·KS F 4009 또는 당해 공사시방서
철근콘크리트용 봉강 (KS D 3504)	화학성분						KS D 3504	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	항복점 또는 항복강도
	인장강도
	연신율
	굽힘성
	겉모양, 치수, 무게
철근콘크리트용 재생봉강 (KS D 3527)	항복점 또는 항복강도						KS D 3527	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	인장강도
	연신율
	굽힘성
	겉모양, 치수, 무게
에폭시 피복철근 (KS D 3629)	피복두께						KS D 3629	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	핀홀
	굽힘성
	열특성(피복경화)
	콘크리트에 대한 부착력
	겉모양, 치수, 무게
재생강재 (KS D 3511)	겉모양, 치수, 무게						KS D 3511	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	인장강도
	항복점
	연신율
	굽힘성
철근콘크리트용 아연 도금 봉강 (KS D 3613)	항복점 또는 항복강도						KS D 3613	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	인장강도
	연신율
	굽힘성
	겉모양, 치수, 무게
	아연도금 부착량						KS D 0201
PC강선 및 PC강연선 (KS D 7002)	겉모양 및 치수						KS D 7002	·제조회사별
	0.2% 영구연신율에 대한 하중
	인장하중
	연신율
	릴랙세이션
PC 강봉 (KS D 3505)	겉모양 및 치수						KS D 3505	·제조회사별
	화학성분(P,S,Cu)
	0.2% 항복강도
	인장강도
	연신율
	릴랙세이션
PC경강선 (KS D 7009)	겉모양 및 치수						KS D 7009	·제조회사별
	0.2% 영구연신율에 대한 하중
	인장하중
	연신율
	릴랙세이션
경강선 (KS D 3510)	겉모양						KS D 3510	·제조회사별
	지름
	인장강도
	감기성능
	비틀림 특성
	굽힘성
연강선재 (KS D 3554)	겉모양						KS D 3554	·제조회사별
	치수
	화학성분
용접철망 및 철근격자	겉모양, 치수, 무게						KS D 7017	·제조회사별	단면수축율은 철근격자일 경우
	항복점 또는 0.2%항복강도
	인장강도
	연신율
	단면수축율
	굽힙성
	용접점 전단강도
	용접점의 박리
철근 이음	겹침 이음		위치				육안관찰 및 스케일에 의한 측정	가공 및 조립시
			이음길이
	가스 압접 이음		위치				육안관찰 및 스케일에 의한 측정	·전체 개소	1검사로트는 1조의작업반이 하루에시공하는 압접개소의수량
			외관검사
			초음파탐사검사				KS B 0839	·1검사 로트에 30개소이상
			인장시험				KS D 0244	·1검사 로트에 3개 이상
	기계적 이음		위치				육안관찰 및 스케일에 의한 측정	·전체 개소
			외관검사
			인장시험				콘크리트표준시방서	·설계도서에 의함
	용접 이음		외관검사				육안관찰 및 스케일에 의한 측정	·모든 이음마다
			용접부 내부결함				KS B 0845 또는 KS B 0896	·500개소 마다
			인장시험				KS B 0802, 0833
배치플랜트	계량기의 눈금점검, 자동계량장치점검						영점검사와 눈금의 정상작동여부	·작업개시전 1회
	믹서성능 시험				가경식믹서		KS F 2455, KS F 8008	·필요시마다
					강제혼합믹서		KS F 2455, KS F 8009
그라우트	컨시스턴시						KS F 2432	·일반 모르타르 공사인 경우 : 작업개시전 1회 ·프리스트레스트 콘크리트(PSC)인 경우 : 주입전, 1회/일 이상 및 품질변화가 인정될 때
	블리딩률 및 팽창률						KS F 2433
	압축강도						KS F 2426
	염화물함유량						KS F 4009 부속서 1 또는 KS F 2715		PSC에 한함
수경성시멘트 무수축 그라우트 (KS F 4044)	유하시간						KS F 4044	·제조회사별
	플로
	응결시간
	블리딩률
	팽창 높이
	압축 강도
	염화물 함유량
조립용 콘크리트 벽판 (KS F 4722)	겉모양, 치수						KS F 4722	·제조회사별 ·제품규격별
	단열성
	차음성
	방수성
	면내 전단 강도
	내화성
	콘크리트 강도
조립용 콘크리트 바닥판 (KS F 4726)	겉모양, 치수						KS F 4726	·제조회사별 ·제품규격별
	단열성
	차음성
	방수성
	내분포압성
	내국압성
	콘크리트 강도
조립용 콘크리트지붕판 (KS F 4729)	겉모양,치수						KS F 4729	·제조회사별 ·제품규격별
	단열성
	차음성
	방수성
	내분포압성
	내국압성
	콘크리트 강도
경량기포 콘크리트 패널( ALC패널) (KS F 4914)	ALC			절건밀도			KS F 4914	·제조회사별 ·제품규격별
				압축강도
				길이변화율
	방청제			방청성능
	패널			겉모양, 치수
				굽힘강도
				단열성
PC조립식 구조접합부	접합부 결함 (초음파 탐상)						당해 공사시방서	·층별 5개소

다. 철강구조물공사

종별	시험종목			시험방법	시험빈도	비고
강재(용접부반입검사)	용접부의 내부결함			KS B 0845	·맞이음부재 총연장의 5/100 또는 10이음에 대하여 1장
				KS B 0896	·완전 용입부위의 20개소에 대하여 1개소
	표면결함검사			육안검사	·전용접부위에 대하여 무작위추출하여 10% 이상
	스터드용접부의 검사			용접후 마무리 높이 및 기울기검사(금속제 곧은자, 한계게이지, 콘벡스롤)	·100개 또는 주요부재 1개에 용접한 숫자 중 작은 쪽을 1개 검사로트로 하여 1개 검사로트마다 1개씩 검사
				타격구부림검사	·100개 또는 주요부재 1개에 용접한 숫자중 작은 쪽을 1개 검사로트로 하여 1개 검사로트마다 1개씩 검사	스터드가 기울어져 있는 경우에는 축에서 축길이를 측정함
강교용접	맞이음의 내부 결함			KS B 0845	·I형보·상자형보·트러스·아치 등의 이음부재 총연장의 5/100 또는 5이음에 대하여 1장
	필렛용접	균열		자분탐상법 또는 침투액탐상법	·주부재의 크레이터측 10개소마다 1개소
		용접비이드의 외관 및 형상		육안검사 등	·주부재의 이음마다
일반 구조용 압연 강재 (KS D 3503)	겉모양,치수,무게			KS D 3503	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	화학성분
	항복점 또는 항복강도
	인장강도
	연신율
	굽힘성
용접 구조용 압연강재 (KS D 3515)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3515	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	화학성분
	탄소당량 또는 용접균열감수성
	항복점 또는 항복강도
	인장강도
	연신율
	샤르피 흡수에너지
용접구조용 내후성 열간압연 강재 (KS D 3529)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3529	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	화학성분
	탄소당량 또는 용접균열감수성
	항복점 또는 항복강도
	인장강도
	연신율
	샤르피 흡수에너지
일반구조용 경량 형강 (KS D 3530)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3530	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	화학성분
	항복점
	인장강도
	연신
열간 압연 연강판 및 강대 (KS D 3501)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3501	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	화학성분
	인장강도
	연신율
	굽힘성
일반구조용 용접 경량 H형강 (KS D 3558)	겉모양, 치수			KS D 3558	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	화학성분
	인장강도
	항복점
	연신율
일반 구조용 탄소강관 (KS D 3566)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3566	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	화학성분
	인장강도
	항복점 또는 항복강도
	연신율
	굽힘성
	평평성
	용접부 인장강도
일반구조용 각형강관 (KS D 3568)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3568	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다	굽힘성 시험은 필요시
	화학성분
	인장강도
	항복점 또는 항복강도
	연신율
	굽힘성
건축구조용 탄소 강관 (KS D 3632)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3632	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	화학성분
	탄소당량 또는 용접균열감수성
	인장강도
	항복점 또는 내력
	항복비
	연신율
	편평성
	샤르피 흡수에너지
	용접부 인장강도
건축구조용 압연강재 (KS D 3861)	겉모양, 모양, 치수, 무게			KS D 3861	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	화학성분
	탄소당량 또는 용접균열감수성
	항복점 내력
	인장강도
	항복비
	연신율
	샤르피 흡수에너지
	두께 방향 특성			KS D 0276
	초음파 탐상			KS D 0040
용접 구조용 원심력 주강관 (KS D 4108)	겉모양, 모양, 치수			KS D 4108, 0401	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	화학성분			KS D 4108
	탄소당량
	항복점 또는 내력
	인장강도
	연신율
	샤르피 충격에너지
	건전성			KS D 0401	·필요시
용접 구조용 주강품 (KS D 4106)	겉모양, 모양, 치수			KS D 4106	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	화학성분
	탄소당량
	항복점 또는 항복강도			KS D 0401
	인장강도
	연신율
	샤르피 흡수에너지
	건전성				·필요시
고내후성 압연강재 (KS D 3542)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3542	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	화학성분
	인장시험
	굽힘성
조립용 형강 (KS D 3593)	겉모양, 치수			KS D 3593	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	화학성분
	인장강도
	항복점
	0.2% 항복강도
	연신율
건축 구조용 표면처리 경량형강 (KS D 3854)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3854	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	화학성분
	항복점
	인장강도
	연신율
	도금의 부착량
구조용 고장력 탄소강 및 저합금강 주강품 (KS D 4102)	겉모양, 치수			KS D 0402	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	화학성분			KS D 0401
	항복점 또는 내구력
	인장강도
	연신율
	단면수축률
	경도
	건전성				·필요시
마찰접합용 고장력 6각볼트, 6각너트, 펴와셔의 세트	겉모양, 치수			KS B 1010	·제조회사별 ·제품규격마다
	나사
	볼트 시험편		항복강도
			인장강도
			연신율
			단면 수축률
	볼트 제품		최소 인장하중
			경도
	너트		경도
			보증하중
	와셔		경도
	세트		토크계수값

라. 기타

종별	시험종목						시험방법	시험빈도	비고
석재	밀도 및 흡수율						KS F 2518	·골재원마다 ·재질 변화시마다
	압축강도						KS F 2519
	탄성파 속도						ASTM D 2845
토목섬유 매트	지반 보강용		인장강도,인장변형률				KS K ISO 10319	·제조회사별 ·제품규격마다 ·20,000제곱미터마다	기타 용도의 지오텍스타일 및 관련제품은 KS K 0920, 0922, 0923, 0924, 0926, 0938 참조
			수직 투수계수				KS K ISO 11058
			봉합강도				KS K ISO 10321
	배수용		인장강도				KS K ISO 10319
			수직 투수계수				KS K ISO 11058
토목섬유 (배수용)	인장강도, 신도						KS K ISO 10319	·제조회사별 ·제품규격마다 ·20,000제곱미터마다
	투수계수						KS K ISO 11058
	유효구멍크기						KS K ISO 12956
	내약품성(액체저항성)						KS K ISO TR 12960	· 흙의 pH가 4 미만 또는 9를 초과하는 경우	시험후 인장강도≥ 50%
토목용 부직포 섬유 (KS K 2630)	겉모양						KS K 2630	·제조회사별 ·제품규격마다 ·20,000제곱미터마다
	무게						KS K ISO 9864
	인장강도 및 신도						KS K 0743
	봉합강도						KS K 0530
	투수계수						KS K 2630
	나비						KS K 0505
	길이						KS K 0507
	두께						KS K ISO 9863-1
드레인보드 (Drain Board)	인장강도 및 신도						KS K ISO 10319	·제조회사별 ·제품규격마다 ·20,000제곱미터마다
	배수성능						KS K ISO 11058 또는 KS K ISO12958
	질량						KS K ISO 9864
	유효구멍크기						KS K 0754 또는 KS K ISO 12956
	내약품성(액체저항성)						KS K ISO TR 12960 또는 당해 공사시방서	· 흙의 pH가 4 미만 또는 9를 초과하는 경우	시험후 인장강도≥ 50%
상수도용 도복장강관 (KS D 3565)	치수, 무게						KS D 3565	·제조회사별 ·제품규격마다	상수도용관
	화학성분
	인장강도
	항복점 또는 항복강도
	연신율
	편평성
	비파괴 검사특성 또는 수압시험특성
	도복장 및 그 방법
수도용 플라스틱 배관 (KS M 3408-2)	내압시험						KS M 3408-2	·제조회사별 ·제품규격마다	상수도용관
	용해시험
	파단점 신장률
	종축 복귀성
	산화유도시간
	용융질량흐름지수
수도용 경질폴리염화비닐관 (KS M 3401)	겉모양, 치수						KS M 3401	·제조회사별 ·제품규격마다	상수도용관
	경질 (VP)			인장항복강도			KS M 3401
				내수압성
				편평성
				비카트 연화온도
				열간내압크리프성			KS M ISO 1167
				용출성			KS M 3401
				불투명성			KS M ISO 7686
	경질 (IWVP, ISO 4422-2)			내수압성			KS M 3401
				비카트 연화온도
				열간내압크리프성			KS M ISO 1167
				용출성			KS M 3401
				불투명성			KS M ISO 7686
				외부 충격 내구성			KS M 3401
				종축 복귀성			KS M ISO 2505-1, KS M ISO 2505-2
				파괴인성			KS M ISO 11673
	내충격 경질 (HIVP)			인장항복강도			KS M 3401
				내수압성
				편평성
				내충격성
				비카트 연화온도
				열간내압크리프성			KS M ISO 1167
				용출성			KS M 3401
일반용 경질폴리 염화비닐관 (KS M 3404)	겉모양, 치수						KS M 3404	·제조회사별 ·제품규격마다	하수도용관
	경질 (VG1, VG2)			인장항복강도			KS M 3404
				내수압성
				접합부 내수압성
				편평성
				침지성
				비카트연화온도
				정량(납)			KS M 3211
	건물내 배수용 경질 (IDVP)			비카트연화온도			KS M 3404
				수밀성
				기밀성
				냉열반복유하성
				외부충격내구성(회전법)
				외부충격내구성(계단법)
				종축복귀성			KS M ISO 2505-1, KS M ISO 2505-2
				디클로로메탄 저항성			KS M ISO 9852
	매설 하배수관용 경질 (ISVP)			비카트연화온도			KS M 3404
				편평 밀봉성
				곡관 밀봉성
				열간 내압 내크리프성
				외부충격내구성(회전법)
				종축복귀성			KS M ISO 2505-1, KS M ISO 2505-2
				디클로로메탄 저항성			KS M ISO 9852
	물 수송용 경질 (IWVP)			비카트연화온도			KS M 3404
				열간 내압 내크리프성
				외부충격내구성(회전법)
				종축복귀성			KS M ISO 2505-1, KS M ISO 2505-2
				파괴인성			KS M ISO 11673
일반용 폴리에틸렌 관 (KS M 3407)	치수						KS M 3407	·제조회사별 ·제품규격마다	하수도용관
	인장시험
	수압시험
	침지시험
	회분 시험
철근콘크리트관 (KS F 4402)	겉모양 및 모양						KS F 4402	·모든 제품마다	하수도용관
	치수							·제조회사별 ·종류 및 호칭별 200개 또는 그 단수마다
	외압강도
	내압강도
	수밀성
원심력 철근콘크리트관 (KS F 4403)	겉모양 및 모양						KS F 4403	·모든 제품마다	하수도용관
	치수							·제조회사별 ·제품규격마다
	외압강도
	내압강도
	방균성능(방균관)							·12개월마다
코어식 프리스트레스트 콘크리트관 (KS F 4405)	겉모양 및 모양						KS F 4405	·모든 제품마다	하수도용관
	치수							·제조회사별 ·종류 및 호칭별 50개 또는 그 단수마다
	내압강도(압력관)
	외압강도(압력관)
프리스트레스트콘크리트 실린더관 (KS F 4406)	겉모양 및 모양						KS F 4406	·모든 제품마다	하수도용관
	치수							·제조회사별 ·제품규격마다
	내압강도
하수도용 콘크리트 맨홀 블록 (KS F 4012)	겉모양 및 모양						KS F 4012	·모든 제품마다
	치수							·제조회사별 ·종류 및 호칭별 200개 또는 그 단수마다
	연결부위 모양						KS F 4012
	압축강도						KS F 2405
	맨홀 연직구체의 외압강도						KS F 4012
	수밀성						KS F 4012
상․하수도․전기․통신용 맨홀뚜껑 및 틀 (KS D 6021)	겉모양,치수,무게						KS D 6021	·제조회사별 ·제품규격마다
	정하중
	흑연구상화율
	화학분석						KS D 4101, KS D 4301, KS D 4302
	기계적성질
수도용 경질 폴리염화비닐 이음관 (KS M 3402)	겉모양, 모양 및 치수						KS M 3402	·제조회사별 ·제품규격마다
	경질 (TS)			인장항복강도			KS M 3402
				내수압성
				편평성
				비카트연화온도			KS M ISO 2507-1, KS M ISO 2507-2
				용출성			KS M 3402
	경질 (IWPS, ISO 4422-3)			인장항복강도			KS M 3402
				내수압성
				비카트연화온도			KS M ISO 2507-1, KS M ISO 2507-2
				용출성			KS M 3402
				압착성			KS M ISO 9853
				열간내압크리프성			KS M 3402
				열이완성			KS M ISO 580
	내충격성 경질 (HITS)			인장항복강도			KS M 3402
				내수압성
				편평성
				내충격성
				비카트연화온도			KS M ISO 2507-1, KS M ISO 2507-2
				용출성			KS M 3402
배수용 경질 염화비닐 이음관 (KS M 3410)	겉모양, 모양 및 치수						KS M 3410	·제조회사별 ·제품규격마다
	DV			인장항복강도			KS M 3410
				내수압성
				편평성
				침지성
				비카트연화온도			KS M ISO 2507-1, KS M ISO 2507-2
				정량(납)			KS M 3211
	IDDV (ISO 3633)			비카트연화온도			KS M ISO 2507-1, KS M ISO 2507-2
				수밀성			KS M 3410
				열이완성			KS M ISO 580
상수도용 도복장 강관 이형관 (KS D 3578)	겉모양, 치수						KS D 3578	·제조회사별 ·제품규격마다
	용접부 품질(방사선 투과)						KS B 0845
	내면도장의 용출성능						KS I 3225
수도용 에폭시 수지분체 내외면 코팅 강관 (KS D 3608)	겉모양, 모양 및 치수						KS D 3608	·제조회사별 ·호칭별 250개 또는 그 단수마다
	도막두께
	핀홀시험
	굽힘시험						KS D 3608	·제조회사별 ·호칭별 1,000개 또는 그 단수마다
	편평시험
	충격시험
	용출성능						KS D 3608,KS I 3225	·필요시
수도용 폴리에틸렌 분체라이닝강관 (KS D 3619)	겉모양, 모양 및 치수						KS D 3619	·제조회사별 ·제품규격마다
	피막 및 피막 두께
	핀홀시험
	당김강도시험
	굽힘시험
	편평시험
	충격시험
	내식성시험
	용출시험
발포 중심층을 갖는 공압출 염화비닐관 (KS M 3413)	겉모양, 모양, 치수, 색						KS M 3413	·제조회사별 ·제품규격마다
	편평시험
	낙추충격
	내열성시험
	내전압시험
	내연성시험
	마찰계수시험
	내약품성시험
	아세톤침적시험
경질 폴리염화비닐 시트 (KS M 3501)	겉모양, 치수						KS M 3501	·제조회사별 ·제품규격마다
	인장항복응력						KS M ISO 527-2
	인장 파괴시 변형
	인장 탄성률						KS M ISO 527-1,2
	노치있는 시험편의 샤르피 충격강도						KS M ISO 179-1
	비카트 연화온도						KS M ISO 306
	가열치수 변화, 적층성						KS M 3501
	전광선 투과율						KS M ISO 13468-1
	내약품성						KS M 3501
	노치없는 시험편의 샤르피 충격강도						KS M ISO 179-1	·필요시
	하중변형온도						KS M ISO 75-2
	크리프 탄성율						KS M ISO 899-2
	밀도						KS M ISO 1183
	굴곡강도						KS M ISO 178
	볼압입강도						ISO 2039-1
	체적저항률						IEC 60093
수도용 고무 (KS M 6613)	겉모양, 치수						KS M 6613	·제조회사별 ·제품규격마다
	경도						KS M 6784
	인장시험						KS M 6782
	영구 신장률						KS M 6518
	노화시험						KS M 6788
	영구 압축 줄음률						KS M 6791
	용해 시험						KS M 6613
	유리황 분석						KS M 6519
	내구성 시험						KS M 6613	·필요시
철선 (KS D 3552)	겉모양, 치수, 무게						KS D 3552	·제조회사별 ·제품규격마다
	굽힘시험(용접철망용)
	비틀림시험
	인장시험						KS B 0802
염화비닐 피복철선 (KS D 7036)	겉모양						KS D 7036	·제조회사별 ·제품규격마다
	인장강도						KS B 0802
	내후성						KS F 2274
	감기성						KS D 0201
	박리시험						KS D 7036
	지름, 최소피막두께
회 주철품 (KS D 4301)	겉모양, 치수, 무게						KS D 4301	·제조회사별 ·제품규격마다
	인장강도						KS B 0802
	경도						KS B 0805
	화학성분						KS D 4301	·필요시
구상 흑연 주철품 (KS D 4302)	겉모양,치수,무게						KS D 4302	·제조회사별 ·제품규격마다
	인장시험						KS B 0802
	충격시험						KS B 0810
	경도						KS B 0805
	흑연 구상화율						KS D 4302
	화학성분							·필요시
연강용 피복아크 용접봉 (KS D 7004)	인장, 충격시험(용착금속)						KS B 0821	·제조회사별 ·제품규격마다
	수소량(용착금속)						KS D 0064
	굽힘시험 (용접이음쇠)					표면굽힘	KS B 0832
						뒷면굽힘
체인링크 철망 (KS D 7018)	겉모양, 치수						KS D 7018	·제조회사별 ·제품규격마다
	아연 부착량						KS D 0201
	알루미늄 부착량						KS D 0229
	알루미늄 피복최소두께
	피복의 밀착성						KS D 7036
콘크리트 구조물 보수용 폴리머시멘트모르타르 (KS F 4042)	시멘트 혼화용 폴리머 고형분						KS F 4916	·제조회사별 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때 ·300톤마다
	휨, 압축, 부착강도						KS F 4041
	내알칼리성
	중성화 저항성
	투수량						KS F 4916
	물흡수 계수						KS F 2609
	습기투과 저항성						KS F 4716
	염화물 이온 침투 저항성						KS F 2711
	길이변화율						KS F 2424
콘크리트 구조물 보수용 에폭시 수지모르타르 (KS F 4043)	겉모양						KS F 4043	·제조회사별 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때 ·300톤마다
	작업가능시간						KS F 2484
	휨, 압축, 부착강도						KS F 4043
	투수						KS F 4043, F 2451
	염화물 이온 침투저항성						KS F 2711
	길이변화율						KS F 2424
콘크리트 구조물 보수용 에폭시수지 (KS F 4923)	점성	점도					KS M 3705	·제조회사별 ·제품규격마다
		틱소트로픽 인덱스
		슬럼프					KS F 4923
	접착강도						KS F 4923
	경화수축률				액비중		KS M 3705
					고체비중		KS M 3016
					경화수축률		KS F 4923
	가열변화						KS F 4923
	인장강도						KS M 3006
	인장파괴시 신장률
	압축강도 (경질형 에폭시수지)						KS M ISO 844
콘크리트 보호용 도막재 (KS F 4936)	도막형성후의 겉모양			촉진내후성시험 후			KS F 4936	·제조회사별 ·제품규격마다
				내알칼리성시험 후
				내염수성시험 후
				온·냉반복시험 후			KS F 4715
	염화물 이온 침투저항성						KS F 4936, KS F 2711
	중성화 깊이						KS F 4936
	투습도
	내투수성
	부착강도
	균열대응성
알루미늄 및 알루미늄 합금 압출형재 (KS D 6759)	겉모양 및 치수						KS D 6759	․제조회사별 ․제품규격마다 ․1m당 3kg이하 : 1ton 또는 그 끝수마다 ․1m당 3kg초과 : 2ton 또는 그 끝수마다
	굽힘시험						KS B 0804
	인장강도						KS B 0802
	항복강도
	연신율
	경도						KS B 0811
	도전율						KS D 0240
알루미늄 및 알루미늄 합금 봉 및 선(KS D 6763)	치수						KS D 6763	․제조회사별 ․제품규격마다 ․1m당 3kg이하 : 1ton 또는 그 끝수마다 ․1m당 3kg초과 : 2ton 또는 그 끝수마다
	압축시험(세로)
	인장강도						KS B 0802
	항복강도
	연신율
	굽힘시험(밀착굽힘)						KS B 0804

2. 토 목

가. 도로공사

(1) 흙 및 혼합골재

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
노체	다짐		KS F 2312	·토질변화시마다	급속함수량측정기사용불가
	함수비		KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·포설후 다짐전 2,000세제곱미터마다
	현장밀도		KS F 2311	·2000세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 450미터마다(층다짐시 : 2차선기준)	급속함수량측정기 사용가능
	평판재하		KS F 2310	·3층 포설후 150미터마다(층다짐시 : 2차선기준) ·2,000세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시	·재료최대치수가 37.5미리미터 이상인 경우 ·현장밀도시험 불가능시
노상	다짐		KS F 2312	·토질변화시마다	급속함수량측정기 사용불가
	함수비		KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·포설 후 다짐 전 1,000세제곱미터마다
	현장밀도		KS F 2311	·1,000세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 400미터마다	급속함수량측정기 사용가능
	평판재하		KS F 2310	·2층 포설 후 200미터마다(층다짐시 : 2차선기준) ·1,000세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)	·재료 최대치수가 37.5㎜ 이상인 경우 ·현장밀도시험불가능시
	프루프롤링 (Proof rolling)		5톤 이상의 복륜하중(타이어접지압 0.55Mpa(5.6kg/㎠ 이상)통과	·노상완성 후 전구간에 걸쳐 3회 이상
동상방지층 및 보조기층	골재의 0.08밀리미터체 통과량		KS F 2511	·골재원마다 ·재질변화시마다
	골재의 밀도 및 흡수율		KS F 2503
	마모		KS F 2508
	노상토지지력비(CBR)		KS F 2320
	다짐		KS F 2312	·골재원마다 ·재질변화시마다	급속함수량시험기 사용불가
	체가름		KS F 2502	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다
	두께		KS F 2367	·1일 1회 이상
	함수비		KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·골재원마다 ·포설 후 다짐 전 500세제곱미터마다
	현장밀도		KS F 2311	·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 200미터마다 : 2차선기준	급속함수량측정기 사용가능
	평판재하		KS F 2310	·선택층 및 보조기층 완성 후 100미터마다 : 2차선기준 ·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)	현장밀도시험 불가능시
	모래당량시험		KS F 2340	·골재원마다 ·재질변화시마다
	프루프롤링 (Proof rolling)		5톤 이상의 복륜하중(타이어접지압 0.55Mpa(5.6kg/㎠ 이상)통과	·완성 후 전구간에 걸쳐 3회 이상
시멘트안정처리기층	체가름		KS F 2502	·골재원마다 ·재질변화시마다	급속함수량측정기 사용불가
	밀도 및 흡수율	굵은골재	KS F 2503
		잔골재	KS F 2504
	안정성		KS F 2507
	마모		KS F 2508
	연석량		KS F 2516
	점토덩어리 함유량		KS F 2512
	0.08밀리미터체 통과량		KS F 2511
	모래당량		KS F 2340
	배합설계		시방규정	·재료가 다른 배합마다
	다짐		KS F 2312	·재질변화시마다
	시멘트 함유량		KS F 2327
	압축강도		KS F 2328	·1일 1회 이상
	함수비		KS F 2306	·골재원마다 ·재질변화시마다 ·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)	500세제곱미터마다 하는 경우에는 급속함수량측정기 사용가능
	현장밀도		KS F 2311	·층별 200미터마다 : 2차선기준 ·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)	급속함수량측정기 사용가능
입도조정기층	밀도		KS F 2308	·골재원마다 ·재질변화시마다	흙
	밀도 및 흡수율		KS F 2503		굵은 골재
	안정성		KS F 2507	·골재원마다 ·재질변화시마다	급속함수량측정기 사용불가
	마모		KS F 2508
	노상토지지력비(CBR)		KS F 2320
	다짐		KS F 2312
	모래당량		KS F 2340
	체가름		KS F 2502	·골재원마다 ·재질변화시마다 ·1,000세제곱미터마다
	0.08밀리미터체통과량		KS F 2511
	함수비		KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·골재원마다 ·재질변화시마다 ·포설 후 다짐 전 500세제곱미터마다
	현장밀도		KS F 2311	·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 200미터마다 : 2차선기준	급속함수량측정기 사용가능
	평판재하		KS F 2310	·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 200미터마다 : 2차선기준	현장밀도시험 불가능시
	프루프롤링 (Proof rolling)		5톤 이상의 복륜하중(타이어접지압 0.55Mpa (5.6kg/㎠ 이상)통과	·기층완성 후 전구간에 걸쳐 3회 이상

(2) 아스팔트 포장

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
아스팔트 혼합물용 골재 (KS F 2357)	부순굵은 골재	입도	KS F 2502	·골재원마다 ·재질이 변할 때마다 ·공사개시전 1회
		절건 밀도	KS F 2503
		흡수율
		안정성	KS F 2507
		편장석률	KS F 2575
		마모율	KS F 2507
		파쇄면 비율	KS F 2357
	잔골재	입도	KS F 2502
		절건 밀도	KS F 2504
		흡수율
		안정성	KS F 2507
		모래당량	KS F 2340
		잔골재 공극률	KS F 2384
아스팔트 콘크리트용 순환골재 (KS F 2572)	구재 아스팔트 함량		KS F 2354	·제조회사마다 ·500톤마다
	씻기시험에서 손실되는 양		KS F 2511
	구재 아스팔트 침입도		KS F 2381, KS M 2252
아스팔트 콘크리트 (KS F 2349)	배합설계		표준시방서	·재료가 다른 각배합마다
	기층용, 중간층용	다짐횟수(회)	KS F 2337	·제조회사마다 ·1일 1회 이상	현장여건에 따라 안정도, 흐름값을 측정하거나 변형강도를 측정
		안정도	KS F 2337
		흐름값	KS F 2337
		변형강도	아스팔트 혼합물 생산 및 시공지침
		공극률	KS F 2364
		포화도	KS F 2349
		간극율
	표층용	다짐횟수	KS F 2337	·제조회사마다 ·1일 1회 이상
		안정도	KS F 2337
		흐름값	KS F 2337
		변형강도	아스팔트 혼합물 생산 및 시공지침
		공극률	KS F 2364
		포화도	KS F 2349
		간극율
		인장강도비(TSR)	KS F 2398	·6개월 1회 이상
		동적안정도	KS F 2374
	기층용 중간층용 표층용	간접인장강도	KS F 2382	·제조회사마다 ·1일 1회 이상	순환골재를 사용하는 경우(추가 시험)
		터프니스
		아스팔트 추출후 침입도	KS F 2381, KS M 2252	·6개월 1회 이상
플랜트	계량기의 눈금점검, 자동계량장치 점검		영점검사와 눈금의 정상작동여부	·작업개시전 1회 ·필요시마다
	아스팔트의 온도		KS F 2356	·1시간에 1회 이상	가열시
	골재의 온도				가열후
	골재의 체가름		KS F 2502	·1일 1회 이상	가열 전·후
아스팔트 포장용 채움재 (KS F 3501)	수분 함량		KS F 3501	·제조회사마다 ·반입시마다
	입도
	소성지수		KS F 2303
	흐름시험		KS F 3501
	침수팽창		KS F 3501
	박리 저항성		KS F 3501
도로포장용 아스팔트 (KS M 2201)	침입도		KS M 2252	·2,000톤마다 ·장기저장으로 재질의 변화가 있다고 판단되는 때 ·제조회사별
	연화점		KS M 2250
	신도		KS M 2254
	톨루엔가용분		KS M 2201
	인화점		KS M 2010
	박막가열	질량 변화율	KS M 2258
		침입도 잔류율
	증발	질량 변화율
		후의 침입도비
	밀도
컷백 아스팔트 (KS M 2202)	인화점		KS M ISO 2592	·제조회사별 ·제품규격마다 ·반입시마다
	점도		KS M 2013
	증류 시험, 증류 찌끼		KS M 2257
	증류찌끼 시험	침입도	KS M 2257
		신도	KS M 2254
		톨루엔가용분	KS M 2201
블론 아스팔트 (KS M 2204)	침입도		KS M 2252	·제조회사별 ·제품규격마다 ·반입시마다
	연화점		KS M 2250
	신도		KS M 2254
	증발질량 변화율		KS M 2255
	침입도지수		KS M 2252
	톨루엔 가용분		KS M 2204
	인화점		KS M 2010
유화 아스팔트 (KS M 2203)	앵글러도(점도)		KS M 2203	·제조회사별 ·제품규격마다 ·반입시마다	종류, 용도별 구분적용
	체잔류분 질량
	부착도
	골재 피막도
	조립도 골재혼합성
	밀입도 골재 혼합성
	흙덩어리 골재 혼합성 질량
	시멘트 혼합성 질량
	입자의 전하
	증발잔류분 질량
	증발 잔류물	침입도
		신도
		톨루엔 가용분 질량
	저장안정도
	동결안정도
플랜트혼합물	혼합물 온도		온도계에 의함	·운반차량마다
	역청함유량		KS F 2354	·1일 1회 이상
	체가름		KS F 2502
	마샬안정도		KS F 2337
	피막박리		KS F 2355	·필요시마다
혼합물의 포설	밀도		KS F 2353	·1일 1회 이상 ·포설 1층당 30아르마다
	두께		KS F 2367
	평탄성	종방향	KS F 2373	·차로마다 전구간	7.6미터 측정기
			3.0미터 측정기	·차로마다 전구간	7.6미터 측정기사용 불가능시
		횡방향	직선자	·200미터마다	측정기사용불가능시

(3) 기 타

종별	시험종목	시험방법	시험빈 도	비고
콘크리트포장	평탄성	종방향	KS F 2373	·차로마다 전구간	7.6미터 측정기
3.0미터 측정기	·차로마다 전구간	7.6미터 측정기 사용 불가능시
횡방향	직선자	·200미터마다
미끄럼방지 포장용 골재	흡수율	KS F 2503	·골재원마다 ·재질이 변할 때마다
입도	KS F 2502
마모율	KS F 2508
유해물 함유량	KS F 2515
점토,점토괴,연한석편
미끄럼방지 포장(수지)	프라이머	밀도(23℃)	KS M ISO 2811-1	·제조회사별 ·제품규격마다
점도(25℃)	KS M ISO 2555
VOC 함량
가사시간(25℃)	AASHTO T237
레진	밀도(23℃)	KS M ISO 2811-1
점도(25℃)	KS M ISO 2555
VOC 함량
건조시간(경화,25℃)	KS M 5000
가사시간(25℃)	AASHTO T237
인장강도	도로공사표준시방서 15-15-2
신율
촉진내후성(300시간)	KS M 5000
슬러리	흡수율	KS F 2476
마모율(50만회)	EN 1436, EN 13197
미끄럼저항	ASTM E303
건조시간(고화,25℃)	KS M 5000
압축강도(24시간)	ASTM C109
접착강도(20℃)	KS F 2476
콘크리트 포장용 신축이음채움재 (줄눈판) (KS F 2538)	치수, 단위무게	KS F 2471	·제조회사별 ·제품규격마다
압축력
돌출
돌출의 회복
흡수율
아스팔트 함유량
노화시험
콘크리트 포장용 주입줄눈재	아스팔트계	콘침입도	도로공사 표준시방서 15-7	·제조회사별 ·제품규격마다
흐름성
접착성
원상회복률
노화시험후회복률
아스팔트 호환성
실리콘계	유동성	ASTM D 2202
성형율	ASTM C 1183
불 점착성	ASTM C 679
접착성	ASTM D 5893
경도	ASTM C 661
흐름성	ASTM D 5893
최대신장율	ASTM D 412(C)
인장력
촉진내후성	ASTM C 793
복원력	ASTM D 5893
줄눈움직임허용치	ASTM C 7 19-93
포장용 콘크리트 평판 (KS F 4001)	모르타르층 평판	모양 및 치수	KS F 4001	·제조회사별 ·종류 및 호칭을 달리할 때 1,000개 또는 그 단수마다
휨강도 하중
휨강도
흡수율
투수계수
표면층 두께
인조석층평판	모양 및 치수
휨강도 하중
휨강도
흡수율
표면층 두께
투수성 아스팔트 혼합물 (KS F 2385)	안정도	KS F 2385	·제조회사별 ·1일 1회 이상
흐름값
공극률
투수계수
보·차도용 콘크리트 인터로킹 블록 (KS F 4419)	보통 블록	겉모양 및 치수	KS F 4419	·제조회사별 ·10,000개 미만 :5개 ·10,000개 이상 100,000개 미만:10개 ·100,000개 초과 :50,000개마다 5개씩 추가
휨강도
흡수율
유색층 두께
투수성 블록	겉모양 및 치수
휨강도
투수계수
유색층 두께
보차도 포장용 판석 (KS F 2530-1)	겉모양, 모양 및 치수	KS F 2530-1	·제조회사별 ·10,000개 미만 :5개 ·10,000개 이상 100,000개 미만 :10개 ·100,000개 초과 :50,000개마다 5개씩 추가
휨강도
흡수율
콘크리트 경계블록 (보·차도용) (KS F 4006)	겉모양, 모양 및 치수	KS F 4006	·제조회사별 ·호칭 및 길이를 달리할 때 1,000매 또는 그 단수마다
휨강도
흡수율
표면층 두께
도로표지용 도료 (KS M 6080)	1종(상온형), 2종(수용성), 3종(가열형)	용기내에서의 상태	KS M 5000-2011	·제조회사별 ·제품규격마다
불점착 건조성	KS M 6080
열안정성
도막의 겉모양
45도,0도 확산반사율
은폐율
블리딩성,내마모성
촉진 내후성
내수성,내알칼리성
냉동안정성
비휘발분	KS M ISO 3251
안료분	KS M 5000-2111
내세척성	KS M 5000-3351
색상	KS M 5000-3011
납, 카드뮴	KS M 6080
4종(융착식)	밀도, 연화점	KS M 6080
불점착 건조성
도막의 겉모양
황색도	KS M 5000-3211
45도,0도 확산반사율	KS M 5000-3121
내마모성,압축강도	KS M 6080
내알칼리성
비휘발분	KS M ISO 3251
촉진내후성	KS M 6080
납, 카드뮴
비휘발전색제분
색상	KS M 5000-3011
열안정성	KS M 6080
유리알 함유량
유리알 겉모양, 모양
도로표지 도료용 유리알 (KS L 2521)	밀도, 입도	KS F 4419	·제조회사별 ·제품규격마다
겉모양
굴절률, 내구성
교량지지용 탄성받침 (KS F 4420)	재료	인장강도	KS M 6518	·제조회사별 ·제품규격마다
파단신장률
인열저항	KS M 6783
영구압축줄음	KS M 6518
촉진노화
오존저항
완제품	전단 응력	대기온도	KS F 4420
저온
노화후
전단 부착	대기온도
노화후
압축강도
반복압축재하
정적 회전	복원모멘트
편심재하
오존저항
교량 지지용 포트받침 (KS F 4424)	고무판	인장강도	KS F 4424	·제조회사별 ·제품규격마다
신장률
경도
노화후	경도변화
인장강도변화율
신장률 변화율
압축영구줄음율
오존균열시험
PTPE판	인장강도
신장률
밀도
완제품	재하시험
내구성시험
교량용 신축 이음장치	고무	인장시험	KS F 4425	·제조회사별 ·제품규격마다
경도시험
인열시험
노화시험
압축영구 줄음율 시험
오존균열 시험
강재	항복점 또는 내력	KS D 3503
인장강도
연신율
굽힘성
제품	수축신장시험	KS F 4425
피로반복시험
PC콘	인장 및 압축	당해 공사시방서	·제조회사별 ·제품규격마다
폴리염화비닐 지수판 (KS M 3805)	겉모양, 치수	KS M 3805	·제조회사별 ·제품규격마다
밀도
경도
인장강도 및 인장변형
노화성
내약품성
유연온도
이중벽 고밀도 폴리에틸렌관 (KS M 3500)	겉모양, 치수	KS M 3500	·제조회사별 ·제품규격마다
원강성계수
편평시험
연결부 수밀시험
회분
터널용 방수시트	합성고분자계	겉모양, 치수	KS F 4911	·제조회사별 ·제품규격마다 ·7,000제곱미터마다 ·재질변화시마다
인장성능
인열성능
온도 의존성
가열신축성상
열화처리후의 인장성능
신장시의 열화성상
접합성상
접합인장성능(복합시트 경우)
개량아스팔트	겉모양	KS F 4917
치수 및 제품의 단위면적무게
인장강도
신장률
항장적
인열성능
내열성능
내피로성능
치수안정성
접합성능
내움푹패임 성능
굴곡성능(무처리,가열후)
교면용 방수시트 (KS F 4931)	전단 접착 성능	KS F 4931	·제조회사별 ·제품규격별
인장 접착 강도
내투수성
내열 치수 안정성
저온 굴곡성
접합 강도
내피로성
내균열성
염화 이온 침투	KS F 2711
인장 성능	KS F 4917
내움푹 패임 성능
치수
교면용 도막 방수재 (KS F 4932)	겉모양	KS F 4932	·제조회사별 ·제품규격별
전단 접착 성능
인장 접착 강도
내투수성
내열 치수 안정성
내피로성
내균열성
작업성	KS M 5000-2421
불휘발분	KS M ISO 3251
지촉 건조 시간	KS M 5000-2511
인장 성능	KS F 3211
염화 이온 침투 저항성	KS F 2711
내움푹 패임 성능	KS F 4917

나. 수공구조물공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
흙댐, 용수로, 배수로용 일반성토 및 표토	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·함수량 변화시마다
	다짐	KS F 2312	·토질변화시마다	급속함수량 측정기 사용불가
	현장밀도	KS F 2311	·토량 10,000세제곱미터마다 ·매층마다 ·용·배수로의 간선은 길이 200미터마다	급속함수량 측정기 사용가능
	투수	KS F 2322	·토질변화시마다
축제성토공	다짐	KS F 2312	·재질변화시마다	급속함수량 측정기 사용불가
	현장밀도 또는 포화도(점질토)	KS F 2311	·각 층별 1회 이상 ·층별 500미터마다. 다만, 토량이 1,000세제곱미터 미만인 공사는 1회 이상	급속함수량측정기 사용가능
	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·강우 후 또는 함수량 변화시마다
	투수	KS F 2322	·토질변화시마다
흙댐의 중심점토	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·토량 300세제곱미터마다
	다짐	KS F 2312	·토질변화시마다	급속함수량 측정기 사용불가
	현장밀도	KS F 2311	·토량 300세제곱미터마다 ·매층마다	급속함수량 측정기 사용가능
	투수	KS F 2322	·토질변화시마다
호안용 블록 (콘크리트 및 모르터)	압축강도	KS F 2405 또는 시편제작	·5,000매마다	·시편을 채취하여 시험 (1:1:1비율로 제작)
아연도 철선 (돌망태 포함)	모양, 치수	KS F 4601 또는 당해 공사시방서	·제조회사별 ·제품규격별 10톤마다
	겉모양
	아연 부착량
	알루미늄 피복 두께

3. 건 축

가. 조적공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
콘크리트벽돌 (KS F 4004)	겉모양	KS F 4004	·제품 30,000매당
	치수
	기건 비중
	압축 강도
	흡수율
점토벽돌 (KS L 4201)	겉모양	KS L 4201	·제품 30,000매당
	치수
	흡수율
	압축강도
내화 점토질 벽돌 (KS L 3201)	모양, 치수	KS L 3201, KS L3111	·제품 30,000매당
	내화도	KS L 3113
	겉보기기공률, 부피비중	KS L 3114
	압축 강도	KS L 3115
	잔존 선팽창 수축률	KS L 3117
	하중 연화점	KS L 3119
고알루미나질 내화벽돌 (KS L 3205)	모양, 치수	KS L 3205, KS L3111	·제품 30,000매당
	내화도	KS L 3113
	겉보기기공률, 부피비중	KS L 3114
	압축 강도	KS L 3115
	잔존 선팽창 수축률	KS L 3117
	화학 성분	KS L 3128
내화단열벽돌 (KS L 3301)	열전도율	KS L 3121	·제품 30,000매당
	겉모양	KS L 3301
	재가열수축률 2%를 초과하지 않는 온도	KS L 3303
	부피비중	KS L 3304
	압축강도	KS L 3305
연소재벽돌 (KS L 8520)	겉모양 및 치수	KS L 8520	·제품 10,000매당
	압축강도
	흡수율
속빈콘크 리트블록 (KS F 4002)	겉모양 및 치수	KS F 4002	·제품 3,000매당
	기건비중
	압축 강도
	흡수율
치장콘크리트 블록 (KS F 4038)	겉모양 및 치수	KS F 4038	·제품 3,000매당
	압축강도
	흡수율
	투수성
경량기포 콘크리트블록 (KS F 2701)	겉모양 및 치수	KS F 2701	·제품 1,000매당
	절건비중
	압축강도
	단열성 시험	KS F 2277
속빈유리블록 (KS F 4903)	겉모양 및 치수	KS F 4903	·제품 1,000매당
	비틀림
	압축강도
	열 충격성
	알칼리 용출량	KS L 2301
	열관류 저항	KS F 2277

나. 방수공사

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
시멘트계 액체형 방수제 (KS F 4925)	안정성		KS F 4925	·제조회사별 ·제품규격별
	투수비
	부착 강도
	물흡수 계수		KS F 2609
	응결 시간		KS L 5103
	압축 강도		KS L 5105
건설용 도막방수재 (KS F 3211)	인장성능		KS F 3211	·제조회사별 ·제품규격별
	인열 성능
	온도 의존성
	가열 신축 성상
	열화 처리 후 인장성능
	신장시 열화 성상
	부착 성능
	내피로 성능
	흘러내림 저항
	고형분
폴리우레아 수지 도막 방수재 (KS F 4922)	도포 작업성, 지촉 건조 시간		KS F 4922	·제조회사별 ·제품규격별
	겉모양
	인장 성능
	인열 성능
	온도 의존성
	가열 신축 성상
	열화 처리 후 인장성능
	신장시 열화 성상
	부착 성능
	내피로성
	고형분		KS M ISO 3251
아스팔트 펠 트 (KS F 4901)	겉모양, 치수 및 질량		KS F 4901	·제조회사별 ·제품규격별
	제품 단위면적질량
	원지 단위면적질량
	원지에 대한 아스팔트 침투율
	인장 성능
	굴곡 성능
	아스팔트 침투 상황
	가열 감량
아스팔트 루 핑 (KS F 4902)	겉모양, 치수 및 질량		KS F 4902	·제조회사별 ·제품규격별
	제품 단위면적질량
	원지 단위면적질량
	원지에 대한 아스팔트 침투율
	피복물의 단위면적질량
	피복물의 회분
	인장 성능
	굴곡 성능
	아스팔트 침투 상황
	내열 성능
아스팔트 슁글 (KS F 4750)	겉모양 및 치수		KS F 4750	·제조회사별 ·제품규격별
	제품 단위 질량
	심재 단위 질량
	피복물의 단위면적질량
	아스팔트 단위면적질량
	심재에 대한 아스팔트 침투율
	인열 성능
	아스팔트 침투 상황
	굴곡 성능
	내열 성능
	표면 광물질 손실량
	촉진 내후 성능		KS F 2274
합성 고분자계 방수시트 (KS F 4911)	겉모양, 치수		KS F 4911	·제조회사별 ·제품규격별
	인장성능
	인열성능
	온도 의존성
	가열신축성상
	열화처리후의 인장성능
	신장시의 열화성상
	접합성상
	접합인장성능(복합시트 경우)
개량 아스팔트 방수시트 (KS F 4917)	겉모양		KS F 4917	·제조회사별 ·제품규격별
	치수 및 제품의 단위면적무게
	인장강도
	신장률
	항장적
	인열성능
	내열성능
	내피로성능
	치수안정성
	접합성능
	내움푹패임 성능
	굴국성능(무처리,가열후)
수팽창성 벤토나이트 방수시트 (KS M 3736)	겉모양 및 치수		KS M 3736	·제조회사별 ·제품규격별 ·5,000제곱미터 마다
	단위면적무게
	낙구 충격성
	벤토나이트 혼합물 부피 팽창률
	누수(정수압)
	인장강도, 신장률 및 인열 강도
자착식형 고무화 아스팔트 방수시트 (KS F 4934)	겉모양 및 치수		KS F 4934	·제조회사별 ·제품규격별
	인장 성능
	인열 성능
	온도 의존성
	굴곡 저항 성능
	접합 안정 성능
	부착 성능
	내움푹 패임 성능
	내피로성
규산질계 분말형 도포방수재 (KS F 4918)	겉모양		KS F 4918	·제조회사별 ·제품규격별
	부착강도
	내잔갈림성
	흡수량
	압축강도
	부착강도		KS F 4715
시멘트 혼입 폴리머계 방수재 (KS F 4919)	겉모양		KS F 4919	·제조회사별 ·제품규격별
	내잔갈림성
	흡수량
	인장강도, 신장률
	내투수성
	습기 투과성
	내균열성
	내알칼리성
	부착강도		KS F 4715
액상형 흡수방지재 (KS F 4930)	침투 깊이		KS F 4930	·제조회사별 ·제품규격별
	내투성 성능
	염화 이온 침투 저항성능
	내흡수 성능		KS F 2609
	용출 저항 성능		KS F 4811
	인화점		KS M 2010
콘크리트용 에폭시수지계 방수・방식재 (KS F 4921)	도료	혼합성	KS F 4921	·제조회사별 ·제품규격별
		용기내 상태	KS M 5000-2011
		도포 작업성	KS M 5000-2421
		경화 건조 시간	KS M 5000-2511
		고형분	KS M 5000-2111, 2112, KS M ISO3251
		에폭시수지 성분 함량	KS M 5000-4332
	도막	겉모양	KS F 4921
		저온·고온 반복
		부착강도	KS F 4716
		내충격성
		투수성	KS F 4925
		용출성(탁도,색도,냄새 등)	KS D 8502
방수공사용 아스팔트 (KS F 4052)	침입도		KS M 2252	·제조회사별 ·제품규격별
	인화점		KS M 2010
	연화점		KS M 2250
	증발질량 변화율		KS M 2255
	트리클로로에탄 가용분		KS M 2256
	침입도지수		KS M 2252

다. 단열․보온공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
발포폴리 스티렌단열재 (KS M 3808)	겉모양, 치수, 밀도	KS M 3808	·시공면적 1,000제곱미터마다 ·1,000매마다
	굴곡 강도
	흡수량
	연소성
	초기 열전도율	KS L 9016
	장기 열전도율	KS M ISO 11561
	압축 강도	KS M ISO 844
발포폴리 에틸렌보온재 (KS M 3862)	겉모양 및 치수	KS M 3862	·시공면적 1,000제곱미터마다 ·1,000매마다
	인장 강도
	흡수량
	두께 수축률
	열전도율	KS L 9016
규산칼슘 보온재 (KS L 9101)	겉모양, 치수 및 무게	KS L 9101	·시공면적 1,000제곱미터마다 ·1,000매마다
	밀도
	휨 강도
	선 수축률
	발수도
	열전도율	KS L 9016
인조광섬유 단열재 (KS L 9102)	겉모양, 치수, 밀도	KS L 9102	·시공면적 1,000제곱미터마다 ·1,000매마다
	열간 수축 온도
	섬유 평균 굵기(미네랄울)
	입자 함유율(미네랄울)
	열 전도율	KS L 9016
방수성펄라이트 보온재 (KS F 4714)	겉모양 및 치수	KS F 4714	·시공면적 1,000제곱미터마다 ·1,000매마다
	밀도
	휨 강도
	선 수축률
	발수도
	열전도율	KS L 9016
경질폴리우레탄폼 단열재 (KS M 3809)	겉모양 및 치수	KS M 3809	·시공면적 1,000제곱미터마다 ·1,000매마다
	흡수량
	투습계수
	녹
	겉보기 밀도	KS M ISO 845
	열전도율	KS L 9016
	굴곡 강도	KS M ISO 1209-1
	압축 강도	KS M ISO 844
	연소성	KS M ISO 9772
단열 모르타르 (KS F 4040)	열전도율	KS L 9016	·시공면적 1,000제곱미터마다
	부착강도	KS F 4716
	길이 변화율	KS F 2424

라. 유리공사

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
강화유리 (KS L 2002)	겉모양 및 치수		KS L 2002	·제조회사별 ·제품규격별	무늬, 플로트, 열선반사 강화유리
	만곡
	낙구 충격 파괴 강도
	파쇄시험
	쇼트백 충격 특성
	내광성, 내마모성, 내산성		KS L 2014	·제조회사별 ·제품규격별	열선반사강화유리
	내알칼리성
복층유리 (KS L 2003)	겉모양 및 치수		KS L 2003	·제조회사별 ·제품규격별	단열, 태양열 차폐 복층유리
	이슬점
	봉착의 가속 내구성
	광학박막성능의 가속내구성
	열 관류 저항(단열성)		KS L 2525
	태양열 제거율(차폐성)		KS L 2514		태양열 차폐복층유리
망판 유리 (KS L 2006)	겉모양 및 치수		KS L 2006	·제조회사별 ·제품규격별
	방화성
접합유리 (KS L 2004)	평면접합유리	겉모양 및 치수	KS L 2004	·제조회사별 ·제품규격별
		만곡, 내열성
		낙구 충격시험
		쇼트백 충격 특성
		내광성	KS L 2007
	곡면접합유리	겉모양	KS L 2004	·제조회사별 ·제품규격별
		내열성
		쇼트백 충격특성
		내광성	KS L 2007
열선흡수 판유리 (KS L 2008)	플로트 판유리, 마판유리	겉모양, 치수	KS L 2012	·제조회사별 ·제품규격별
		기포, 이물질
		점상 결점 밀집도
		선상·대상 결점
		흠, 파상, 잔금
		절단면 결점
	태양열 취득율(5㎜)		KS L 2008, L 2514
	망판유리 선판유리	겉모양 및 치수	KS L 2006
		방화성
열선반사 유리 (KS L 2014)	겉모양 및 치수		KS L 2014	·제조회사별 ·제품규격별
	내광성, 내산성
	내마모성, 내알칼리성
	태양열 차폐성		KS L 2514
배강도유리 (KS L 2015)	겉모양 및 치수		KS L 2015	·제조회사별 ·제품규격별
	휨, 표면압축응력

마. 창호공사

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
창호 목제 틀재 (KS F 3108)	겉모양 및 치수		KS F 3108	·제조회사별 ·제품규격별
	휨 강도
	함수율		KS F 2199
	방부, 방충 처리		KS M 1701
문세트 (KS F 3109)	치수		KS F 3109, KS F 1515	·제조회사별 ·제품규격별
	비틀림 강도		KS F 3109
	연직 하중 강도		KS F 2631
	개폐력		KS F 2237
	개폐 반복성		KS F 4534
	내충격성		KS F 2236
	내풍압성		KS F 2296
	기밀성		KS F 2292
	수밀성		KS F 2293
	방음성		KS F 2808
	단열성		KS F 2278
	내화성		KS F 2268-1
	차연성		KS F 2846
창세트 (KS F 3117)	치수		KS F 3117, KS F 1515	·제조회사별 ·제품규격별
	개폐력		KS F 2237
	개폐 반복성	스윙 창세트	KS F 3109
		슬라이딩 창세트	KS F 4534
	내풍압성		KS F 2296	·제조회사별 ·제품규격별	목제창세트는 제외
	기밀성		KS F 2292
	수밀성		KS F 2293
	손잡이대 강도(슬라이딩 창세트)		KS F 2239
	방음성		KS F 2808
	단열성		KS F 2278
	함수율		KS F 2199	·제조회사별 ·제품규격별	목제 창세트에만 적용
합성수지 창호형형재 (KS F 5602)	겉모양, 치수 및 질량		KS F 5602	·제조회사별 ·제품규격별
	저온 추 낙하 강도
	가열 변형
	가열 신축성
	냉열 반복
	색차		KS M 3832
	경도		KS M ISO 2039-2
	인장강도 및 신장률		KS M 3006
	굴곡 탄성률		KS M ISO 178
	충격 강도		KS M 3056
	비카 연화 연도		KS M 3076
	내연소성(흰색형재)		KS M 3015
	내후성	샤르피 충격강도	KS F 2274, KS M 3056
		변퇴색	KS F 2274, KS F 5602
경첩 (KS F 4519)	겉모양		KS F 4519	·제조회사별 ·제품규격별
	인장 내구성
	내구성		KS F 2275

바. 마감공사(지붕· 목공사 포함)

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
보통합판 (KS F 3101)	겉모양 및 치수		KS F 3101	·제조회사별 ·제품규격별
	접착력	인장전단
		침지박리
	함수율
	밀도
	붕소 화합물 흡수량
	폭심, 페니트로티온 흡수량
	흡습성
	난연성
	폼알데하이드 방산량		KS M 1998
구조용 집성재 (KS F 3021)	겉모양 및 치수		KS F 3021	·제조회사별 ·제품규격별
	접착 강도
	휨성능
	인장성능
	함수율		KS F 2199
플로어링 보드 (KS F 3103)	겉모양 및 치수		KS F 3103	·제조회사별 ·제품규격별
	함수율
	휨강도
	방부 처리	침윤도
		흡수량
천연무늬목 치장마루판 (KS F 3111)	겉모양, 치수 및 직각도		KS F 3111	·제조회사별 ·제품규격별
	습열성
	내한성
	내열성
	내오염성
	내산성
	내알칼리성
	내시너성
	내마모성
	내변퇴색성
	도막 밀착력(테이프시험)
	접착성		KS F 3101
	함수율
	흡수 두께 팽창률		KS F 3200
	치수 변화율		KS F 3126
	휨 강도, 습윤시 휨 강도		KS F 3200
	평면 인장 강도		KS F 3104
	실내공기 오염물질 방출량 (총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)		KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험기준 (환경부고시)	·필요시
섬유판 (KS F 3200)	연질판	겉모양,치수,직각도	KS F 3200	·제조회사별 ·제품규격별	용도 및 접착제 등에 따라 구분 적용
		밀도
		함수율
		휨 강도
		흡수 두께 팽창률
		단열성(열저항)	KS F 2277
		난연성	KS F 2271	·필요시
	중밀도판	겉모양,치수,직각도	KS F 3200 KS F 3200	·제조회사별 ·제품규격별
		밀도, 함수율
		휨 강도
		습윤시 휨강도
		흡수 두께 팽창률
		박리 강도
		나사못 유지력
		폼알데하이드방산량	KS M 1998
		난연성	KS F 2271	·필요시
	경질판	겉모양,치수,직각도	KS F 3200	·제조회사별 ·제품규격별
		밀도, 함수율
		휨파괴 하중	KS F 2263
		휨 강도, 흡수율	KS F 3200
		흡수 길이 변화율
		못 역인발 저항
		평면 인장 강도	KS F 3200
		내충격성
		내산성,내알칼리성
		내오염성
		내변퇴색성	KS M 3072
		내긁힘성	KS F 3200
		도막부착성
		내세척성
		내후성	KS F 2274
		난연성	KS F 2271	·필요시
파티클보드 (KS F 3104)	바탕, 단판 붙임	겉모양,치수,직각도	KS F 3104	·제조회사별 ·제품규격별	접착제 종류에 따라 구분 적용
		밀도, 함수율
		휨강도
		습윤시 휨 강도
		흡수 두께 팽창률
		박리 강도
		나사못 유지력
		폼알데하이드방산량	KS M 1998
		난연성	KS F 2271	·필요시
		단열성(열저항)	KS F 2277	·필요시
	치장	겉모양,치수,직각도	KS F 3104	·제조회사별 ·제품규격별
		밀도
		함수율
		휨강도
		습윤시 휨 강도
		흡수 두께 팽창률
		박리 강도
		나사못 유지력
		폼알데하이드방산량	KS M 1998
		평면 인장 강도	KS F 3104
		내충격성
		내산성
		내알칼리성
		내오염성
		내알칼리성
		내오염성
		내변퇴색성	KS M 3072
		내긁힘성	KS F 3104
		난연성	KS F 2271	·필요시
		단열성(열저항)	KS F 2277
석고보드 (KS F 3504)	석고 보드 (GB-R)	겉모양, 치수	KS F 3504	·제조회사별 ·제품규격별
		함수율
		휨 파괴 하중
		연소성능	KS F 3504
		단열성	KS F 2277-부속서 B
		실내공기 오염물질 방출량(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험기준 (환경부고시)	·필요시
	방수 석고 보드 (GB-S)	겉모양, 치수	KS F 3504	·제조회사별 ·제품규격별
		함수율, 흡수성
		흡수시 내박리성
		휨 파괴 하중
		연소성능	KS F 3504
		단열성	KS F 2277-부속서 B
		실내공기 오염물질 방출량(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험기준 (환경부고시)	·필요시
	방화 석고 보드 (GB-F)	겉모양, 치수	KS F 3504	·제조회사별 ·제품규격별
		함수율
		휨 파괴 하중
		내충격성
		내화염성, 연소성능
		단열성	KS F 2277-부속서 B
		단위면적당 질량	KS F 3504
		실내공기 오염물질 방출량(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험기준 (환경부고시)	·필요시
	석고 라스 보드 (GB-L)	겉모양, 치수	KS F 3504	·제조회사별 ·제품규격별
		함수율
		휨 파괴 하중
		실내공기 오염물질 방출량(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험기준 (환경부고시)	·필요시
	치장 석고 보드 (GB-D)	겉모양, 치수	KS F 3504	·제조회사별 ·제품규격별
		함수율
		휨 파괴 하중
		내충격성
		연소성능	KS F 3504
		단열성	KS F 2277-부속서 B
		내변퇴색성	KS M 3072,KS F 3504
		실내공기 오염물질 방출량(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험기준 (환경부고시)	·필요시
이중바닥재 (KS F 4760)	겉모양 및 치수		KS F 4760	·제조회사별 ·제품규격별
	직각도, 평탄도
	국부 압축 저항성
	내충격성
	내연소성
	대전성
	누설 저항성
	방식 성능	도막 밀착성	KS F 4760
		도막 내식성	KS D 9502
섬유강화 시멘트판 (KS L 5114)	파형 시멘트판	겉모양 및 치수	KS L 5114	·제조회사별 ·제품규격별	종류에 따라 구분적용
		휨파괴하중
		흡수율
		투수성
	평형 슬레이트	겉모양 및 치수	KS L 5114	·제조회사별 ·제품규격별
		휨강도	KS F 2263
		흡수율	KS L 5114
		투수성
		흡수에 의한 길이변화율
	펼라이트판	겉모양 및 치수	KS L 5114	·제조회사별 ·제품규격별
		부피 비중
		휨강도	KS F 2263
		투수성	KS L 5114
		흡수에 의한 길이변화율
		열전도율	KS L 9016
	규산칼슘판	겉모양 및 치수	KS L 5114	·제조회사별 ·제품규격별
		부피 비중
		휨강도	KS F 2263
		흡수에 의한 길이변화율	KS L 5114
		열전도율	KS L 9016
	슬래그 석고판	겉모양 및 치수	KS L 5114	·제조회사별 ·제품규격별
		부피비중
		휨강도	KS F 2263
		투수성	KS L 5114
		흡수에 의한 길이변화율
PVC계 바닥재 (KS M 3802)	바닥 타일	겉모양 및 치수	KS M 3802	·제조회사별 ·제품규격별
		압입량
		잔류 압입률
		가열에 의한 길이변화율
		흡수에 의한 길이변화율
		가열 감량률
		긁기시험
		오염성
	바닥 시트	겉모양 및 치수	KS M 3802	·제조회사별 ·제품규격별
		압입량
		잔류 압입률
		가열에 의한 길이변화율
		가열 감량률
		오염성
	박리강도		KS M 3802	·필요시
	퇴색성		KS M ISO 4892-4
	미끄럼성		KS F 2602, KS M 3802-부속서 A
	마모성		KS F 2811, KS F 2813
	난연성		KS F 2271
도자기질 타일 (KS L 1001)	겉모양 및 치수 (모자이크 타일 제외)		KS L 1001	·제조회사별 ·제품규격별	종류 및 용도에 따라 구분적용
	뒤틀림
	치수의 불규칙도
	흡수율		KS L 1001
	내균열성(시유타일)		KS L 1001
	내마모성(바닥타일)
	꺽임 강도
	동결 융해(외장,바닥타일)
	내약품성
	첨지의 접착성, 박리성, 재질 및 개구율(구성타일)
점토기와 (KS F 3510)	겉모양 및 치수		KS F 3510	·제조회사별 ·제품규격별 ·3,000개 마다
	흡수율
	휨 파괴 하중
	내동해성
건조 시멘트 모르타르 (KS L 5220)	압축강도(7,28일)		KS L ISO 679	·제조회사별 ·제품규격별 ·제조일부터 3개월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	보수성		KS L 5219
	공기량		KS L 3136
	모래의 함량		KS F 2502
	모래의 최대크기
시멘트계 자기 수평 모르타르 (KS F 4041)	플로값		KS F 4041	·제조회사별 ·제품규격별 ·제조일부터 3개월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	응결시간		KS L 5108
	휨강도		KS F 2408
	압축강도		KS L 5105
	부착강도		KS F 4041
	내충격성		KS F 4041
	길이변화율		KS F 2424
	내마모성		KS F 4041,KS F 2813
주차장 바닥용 표면마감재 (KS F 4937)	부착 성능		KS F 4937	·제조회사별 ·제품규격별
	윤하중 저항 성능
	수밀성
	내충격성
	오염 물질 방출량		KS I ISO 16000-3, 16000-6
시멘트계 바탕바름재 (KS F 4716)	연도변화		KS F 4716, KS L 5207	·제조회사별 ·제품규격별
	부착 강도		KS F 4716
	내잔갈림성
	내충격성
	온냉 반복 저항성
	습기 투과성		KS F 2607
	물흡수 계수		KS F 2609
얇은 마무리용 벽바름재 (KS F 4715)	외장 얇은 바름재	저온 안정성	KS F 4715	·제조회사별 ·제품규격별
		내잔갈림성
		부착 강도
		온냉 반복 저항성
		내세척성
		내충격성
		내알칼리성
		가요성
		물흡수 계수	KS F 2609
		내후성	KS F 2274
		습기 투과	KS F 2607
	내장 얇은 바름재	저온 안정성	KS F 4715	·제조회사별 ·제품규격별
		내잔갈림성
		부착 강도
		내세척성
		내충격성
		내알칼리성
		가요성
		내변퇴색성	KS F 3072
		연소성능	KS F ISO 5660-1
		가요성	KS F 4715

사. 도장공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
수성도료 (KS M 6010)	1, 2 종	열 안정성	KS M 6010	·제조회사별 ·제품규격별
냉동 안정성
적신 도막 은폐율
주도	KS M 5000-2122
비휘발분	KS M ISO 3251
안료분	KS M 5000-2111
건조시간	KS M 5000-2511
확산 반사율(45°, 0°)	KS M 5000-3121
광택	KS M ISO 2813
은폐율	KS M ISO 2814
내세척성	KS M 5000-3351
내알칼리성	KS M 6010, KS M ISO 2812-1
촉진내후성	KS M 5000-3231
저장 안정성	KS M 5000-2021, 2031
냄새	KS M 5000-2041
내곰팡이성	KS M 5000-3431
용기내 상태	KS M 5000-2011
3종	연마용이성	KS M 6010	·제조회사별 ·제품규격별
부착강도
저온 안정성
상도 적합성
비휘발분	KS M ISO 3251
건조시간	KS M 5000-2511
용기내 상태	KS M 5000-2011
내수성	KS M 6010 KS M ISO 2812-1, 2
내알칼리성
유성도료 (KS M 6020)	1 종	색상	KS M 5000-3011	·제조회사별 ·제품규격별	1종 조합도료 (1급, 2급)
용기내 상태, 안료분	KS M 5000-2011
비휘발 전색제	KS M 5000-2112
광택	KS M ISO 2813
은폐율	KS M ISO 2814
확산 반사율(45°, 0°)	KS M 5000-3121
건조 시간	KS M 5000-2511,2512
내 굴곡성	KS M 5000-3331
촉진 내후성	KS M 5000-3231
2 종	비휘발분	KS M ISO 3251	·제조회사별 ·제품규격별	2종 자연 건조형 에나멜 유광(1급, 2급), 반광, 무광
용기내 상태	KS M 6020
희석 안정성, 내수성
내휘발유성,나이프시험
비휘발 전색제분	KS M 5000-2112
은폐율	KS M ISO 2814
광택	KS M ISO 2813
확산 반사율(45°, 0°)	KS M 5000-3121
건조 시간, 재도장시험	KS M 5000-2511
굴곡성	KS M 5000-3331
저장성	KS M 5000-2021
촉진 내후성	KS M 5000-3231
3 종	내수성	KS M 6020	·제조회사별 ·제품규격별	3종 알루미늄 도료
용기내 상태	KS M 5000-2011
고착 건조 시간	KS M 5000-2511
광택	KS M ISO 2813
은폐율	KS M ISO 2814
비휘발분	KS M ISO 3251
촉진내후성	KS M 5000-3231
내굴곡성	KS M 6020, KS M 5000-3331
4 종	희석 안정성	KS M 6020	·제조회사별 ·제품규격별	4종 아크릴 도료
내수성, 내알칼리성
비휘발분	KS M ISO 3251
비휘발 전색제분	KS M 5000-2112
은폐율	KS M ISO 2814
광택	KS M ISO 2813
건조시간(지촉, 경화)	KS M 5000-2511
용기내 상태	KS M 5000-2011
재도장	KS M 5000-2511
촉진 내후성	KS M 5000-3231
방청도료 (KS M 6030)	1 종	굴곡성	KS M 6030, M 5000-3331	·제조회사별 ·제품규격별	1종 광명단 조합 페인트 (1류,2류,3류)
안료분	KS M 5000-2111
순 광명단분	KS M 5000-5031
순 산화철분	KS M 5000-5121
비휘발 전색제분	KS M 5000-2112
건조시간(지촉, 경화)	KS M 5000-2512
희석 안정성	KS M 5000-2311
용기내 상태	KS M 5000-2011
2 종	굴곡성	KS M 6030, KS M 5000-3331	·제조회사별 ·제품규격별	2종 크롬산아연 방청 페인트 (1류,2류)
내수성	KS M 6030
안료분	KS M 5000-2111
비휘발분	KS M ISO 3251
건조시간(지촉, 경화)	KS M 5000-2511
희석 안정성	KS M 5000-2311
용기내 상태	KS M 5000-2011
안료 조성	크롬산,아연화	KS M 5000-5561
적색 산화철
이산화티탄	KS M 5000-5041
3 종	굴곡성	KS M 6030, KS M 5000-3331	·제조회사별 ·제품규격별	3종 아연 분말 프라이머 (1류,2류,3류)
접착력,	KS M 6030
내수성	KS M 6030
안료분	KS M 5000-2111
안료분석	금속 아연분	KS M 5000-5171
아연화분	KS M 5000-5052
비휘발 전색제분	KS M 5000-2112
로진 및 그 유도체	KS M 5000-2611
건조시간(지촉, 경화)	KS M 5000-2511,2512
용기내 상태	KS M 5000-2011
4 종	안료 중 산화 아연	KS M 6030	·제조회사별 ·제품규격별	4종 에칭 프라이머 (1류, 2류)
인산(첨가제)
내충격성
비휘발분	KS M ISO 3251
안료분	KS M 5000-2111
안료 중 크롬산	KS M 5000-5161
용기내 상태	KS M 5000-2011
가사 시간	KS M 5000-2411
고착 건조	KS M 5000-2511
내굴곡성	KS M 5000-3331
내염수성	KS M ISO 2812-1
내후성	KS M ISO 2810
5 종	내굴곡성	KS M 6030, M 5000-3331	·제조회사별 ·제품규격별	5종 광명단 크롬산 아연 방청 프라이머
내염수성	KS M 6030
사삼산화납(안료)	KS M 5000-5031
크롬산아연(안료)	KS M 5000-5561
안료분	KS M 5000-2111
비휘발분	KS M ISO 3251
경화 건조 시간	KS M 5000-2512
용기내 상태	KS M 5000-2011
6 종	가사 시간	KS M 6030	·제조회사별 ·제품규격별	6종 타르 에폭시 수지
내충격성, 냉열반복
내알칼리성, 내휘발유성
내산성, 내유성, 내습성
에폭시 수지 검출
용기내 상태	KS M 5000-2011
고착 건조 시간	KS M 5000-2511
내굴곡성	KS M 5000-3331
염수 분무	KS D 9502
비휘발분	KS M ISO 3251
래커도료 (KS M 6040)	1, 2, 3 종	연마 용이성	KS M 6040	·제조회사별 ·제품규격별	1종(래커 프라이머) 2종(래커 퍼티) 3종(래커 서페이서)
상도 적합성
블리딩
내충격성	KS M 6040, M ISO 6272-2
내수성	KS M 6040, M ISO 2812-1,2
고화 건조 시간	KS M 5000-2511
내굴곡성	KS M 5000-3331
비휘발분	KS M ISO 3251
용기내 상태	KS M 5000-2011
4, 5 종	연마 용이성	KS M 6040	·제조회사별 ·제품규격별	4종 (목재용 우드실러) 5종 (목재용 샌딩실러)
상도 적합성
고화 건조 시간	KS M 5000-2412
비휘발분	KS M ISO 3251
용기내 상태	KS M 5000-2011
6, 7 종	내블로킹성	KS M 6040	·제조회사별 ·제품규격별	6종 (마감용 투명래커) 7종 (상도마감용 레커 애나멜)
블리딩
내수성, 내휘발유성	KS M 6040, M ISO 2812-1, 2
가열 안정성	KS M 6040, M 5000-3021
투명성	KS M 5000-2051
고화 건조 시간	KS M 5000-2511
은폐율	KS M ISO 2814
광택	KS M ISO 2813
비휘발분	KS M ISO 3251
용기내 상태	KS M 5000-2011
바니시 (KS M 6050)	저온 안정성(1종, 2종)	KS M 6050	·제조회사별 ·제품규격별
내수성	1종, 2종	KS M 6050
3종	KS M ISO 2812-1,2
건조시간	KS M 5000-2511
비점착 시간
인화점	KS M 5000-6011
드레프트시험	KS M 5000-2251
가스시험	KS M 5000-2241
스키닝	KS M 5000-2021
내곰팡이성	KS M 5000-3431
비휘발분	KS M ISO 3251
산값	KS M 5000-4122
로진 및 유도체	KS M 5000-2611
도료용 희석제 (KS M 6060)	비휘발성 물질	KS M 6060	·제조회사별 ·제품규격별
증류시험 (초류점, 유출량, 유출온도)	KS M 5000-6022
인화점	KS M 5000-6011
아닐린점	1종	KS M 5000-6032
2종	KS M 5000-6031
캐톤 및 에스테르	KS M 5000-6131
겉모양	KS M 5000-2051
점적 시험	KS M 5000-6051
구리 부식성	KS M 5000-6111
산 값	KS M 5000-6141
다채무늬도료 (KS M 6090)	도료	용기내 상태	KS M 5000-2011	·제조회사별 ·제품규격별
도장작업성	KS M 5000-2411,2412
주도(KU)	KS M 5000-2122
비휘발분(%)	KS M ISO 3251
건조시간(고화)	KS M 5000-2511
도막	도막 외관	KS M 6090
내광성(수은램프법)	KS M 6090
내알칼리성	KS M ISO 2812-1
내세척성	KS M 6090
폼알데하이드 방산량	KS M 6090
굽도리 모르타르면 페인트	주도(KU)	KS M 5000-2122	·제조회사별 ·제품규격별
연화도(N.S)	KS M 5000-2141
비휘발분(%)	KS M ISO 3251
건조시간(고화)	KS M 5000-2512
붓 작업성	KS M 5000-2411
광택(60°)	KS M ISO 2813
내수성 및 내알칼리성	주택건설전문시방서
낙서방지용 페인트	도막의 상태	KS M 5000-2421	·제조회사별 ·제품규격별
용기내 상태	KS M 5000-2011
안료분(%)	KS M 5000-2111
주도(KU)	KS M 5000-2122
연화도(N.S)	KS M 5000-2141
비휘발문(%)	KS M ISO 3251
건조시간(경화)	KS M 5000-2512
붓작업성	KS M 5000-2411
광택(60°)	KS M ISO 2813
내구성 및 내알칼리성	주택건설전문시방서
내오염성	주택건설전문시방서
에폭시 바닥마감재	하도	비휘발분(혼합)	KS M ISO 3251	·제조회사별 ·제품규격별
지촉건조시간	KS M 5000-2512
경화건조시간	KS M 5000-2512
도막의 상태	KS M 5000-2421
상도 적합성	KS M 5507
주도(주제)	KS M 5000-2122
가사시간	주택건설전문시방서
중상도	비휘발분(혼합)	KS M ISO 3251
용기내 상태(주제)	KS M 5000-2011
연화도(주제)	KS M 5000-2141
주도(주제)	KS M 5000-2122
지촉건조	KS M 5000-2512
경화건조	KS M 5000-2512
가사시간	주택건설전문시방서
내수성(168hr)	주택건설전문시방서
내알카리성(168hr)	주택건설전문시방서
부착강도	KS F 4715
내마모성	주택건설전문시방서
도막의 상태	KS M 5000-2421
광택(60°)	KS M ISO 2813
내충격성	주택건설전문시방서
반광택방청 에나멜 (KS M 5962)	실크스크린 작업성	KS M 5962	·제조회사별 ·제품규격별
침지성
재도장성
내수성
내휘발유성
비휘발분	KS M 5000-2113
안료분	KS M 5000-2111
비휘발분 전색제분	KS M 5000-2112
프탈산무수물분	KS M 5000-4311
지방산분	KS M 5000-4321
불비누화물분	KS M 5000-4411
로진 정성	KS M 5000-2611,2612
페놀 정성	KS M 5000-4431
전납분	KS M 5000-5171
전크롬산분	KS M 5000-5091
광명단분	KS M 5000-5031
아연화분	KS M 5000-5051
탄산칼슘	KS M 5000-5011
수분	KS M 5000-2261
점도	KS M 5000-2123
비중	KS M 5000-2131
인화점	KS M 5000-6011
건조시간	KS M 5000-2511
광택	KS M 5000-3312
연화도	KS M 5000-2141
은폐율	KS M 5000-3111
색상	KS M 5000-3011
용기내 상태	KS M 5000-2011
저장 안정성	용기에 찼을 때	KS M 5000-2031
차지 않았을 때	KS M 5000-2031, KS M 5000-2021
희석 안정성	KS M 5962, M 5000-2311
붓 작업성	KS M 5962, M 5000-2411
스프레이 작업성	KS M 5962, M 5000-2412
롤러 작업성	KS M 5962
냄새	KS M 5000-2041
굴곡성	KS M 5962, M 5000-3331
나이프 시험	KS M 5962, M 5000-3341
내염수 분무성	KS M 5962, KS D 9502
촉진 내후성	KS M 5962, M 5000-3231
특수용의 용제 분석	KS M 5962
조합페인트 목재 프라이머 (KS M 5318)	점착성	KS M 5318	·제조회사별 ·제품규격별
리프팅
실링성(충전성)
내수성
나이프시험
안료분	KS M 5000-2111
불휘발 전색제분	KS M 5000-2112
확산 반사율	KS M 5000-3121
주도	KS M 5000-2122
건조 시간(지촉, 경화)	KS M 5000-2511
연화도	KS M ISO 1524
수분	KS M 5000-2261
용기내 상태	KS M 5000-2011
색상	KS M 5000-3011
저장 안정성	용기에 찼을 때	KS M 5000-2031
차지 않았을 때	KS M 5000-2031, KS M 5000-2021
붓칠 작업성	KS M 5000-2411
스프레이 작업성	KS M 5000-2412
내굴곡성 시험	KS M 5000-3331
은폐율	KS M ISO 2814

아. 기타

종별	시험종목			시험방법	시험빈도	비고
유리섬유강화 플라스틱제 정화조 (KS F 4803)	내압강도			KS F 4803	·제조회사별 ·제품규격별
	칸막이 강도
	접촉재 강도
	재하 강도
	수밀성
	강성
	용량
	소음			KS I ISO 1996-1～3
	경도			KS M 3305
	내약품성			KS M ISO 175
열경화성 수지 고압 화장판 (KS M 3803)	일반용		겉모양	KS M 3332	·제조회사별 ·제품규격마다
			내열수성
			내끓임성
			내열성
			내오염성
			내광성
			내시가레트성
			내마모성
			치수변화율
			내충격성
			굴곡강도
			파단변형량
			탄성률
			인장강도
	수직면용		겉모양	KS M 3332	·제조회사별 ·제품규격마다
			내오염성
			내광성
			내마모성
			치수변화율
			내충격성
			인장강도
	포스트 포밍용		겉모양	KS M 3332	·제조회사별 ·제품규격마다
			내오염성
			내광성
			내마모성
			치수변화율
			내충격성
			굴곡성형성
도자기질타일용 접착제 (KS L 1593)	겉모양			KS L 1593	·제조회사별 ·제품규격별
	저장 안정성
	혼합 종결 확인 용이성
	접착강도
	내열성
	미끄럼 저항성
	가사 시간 및 부착가능 시간
	실내공기 오염물질 방출량(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)			KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험기준 (환경부고시)	·필요시	․ 실내에 시공되는 경우에 한함
벽용 보드류 접착제 (KS F 3213)	작업성			KS F 3213	·제조회사별 ·제품규격별
	맞붙임 가능 시간 (에폭시 수지 이외)
	사용가능시간(에폭시 수지)
	접착강도 시험방법			KS F 2218
	비중			KS M 3705
	실내공기 오염물질 방출량			KS F 3213, KS M 1998
천장용 보드류 접착제 (KS F 3214)	맞붙임 가능 시간 (에폭시 수지 이외)			KS F 3214	·제조회사별 ·제품규격별
	작업성			KS F 3213
	늘어짐			KS F 2217
	접착 강도	마스틱상 접착제		KS F 2217
		페이스트상 접착제		KS F 3213
	비중			KS F 3213
	사용가능시간(에폭시 수지)			KS F 3213
	실내공기 오염물질 방출량			KS F 3214, KS M 1998
비닐계 바닥재용 접착제 (KS F 3218)	도포성			KS F 3218	·제조회사별 ·제품규격별
	인장 접착 강도 (바닥 타일)
	90도 박리 접착 강도 (바닥 시트)
	비중			KS M 3705
	실내공기 오염물질 방출량			KS F 3218, KS M 1998
수도용 경질 염화비닐관용접착제 (KS M 3409)	접착력			KS M 3409	·제조회사별 ·제품규격별
	건조 감량
	점도
초산비닐수지 에멀션목재 접착제 (KS M 3700)	목재 오염성			KS M 3700	·제조회사별 ·제품규격별
	접착력
	요소수지 혼화성
	조막성
	겉모양			KS M 3704
	점도
	회분
	pH			KS M 3705
	증발 찌꺼기
요소수지 목재접착제 (KS M 3701)	겉모양			KS M 3701	·제조회사별 ·제품규격별
	보존성
	물 혼화성
	아세트산비닐 혼화성
	유리 폼알데하이드
	압축 전단 접착 강도
	합판 접착 강도
	겔화시간
	불휘발분			KS M 3705
	pH
	점도
황동 논슬립 (KS F 4527)	겉모양 및 치수			KS B 5203-1, KS F 4527	·제조회사별 ·제품규격별 ·500개마다
	화학 성분 시험			KS F 4527

【별표 2】

품질관리규정 작성기준

항목	내용
1. 책임 및 권한	◦최고경영자는 품질관리 조직을 갖추고 구성원에 대한 책임과 권한을 규정할 것 ◦최고경영자는 품질관리규정이 항상 이행되고 준수됨을 보장하기 위하여 품질책임자를 임명할 것.
2. 문서관리	◦시험․검사와 관련된 문서의 작성, 검토, 승인, 등록, 이용, 변경 및 폐기를 포함한 문서관리절차를 갖출 것.
3. 기록관리	◦시험․검사와 관련된 기록의 수집, 식별, 보관, 보호, 열람 및 처분을 포함한 기록관리절차를 갖출 것.
4. 교육훈련 및 자격부여	◦교육훈련계획 수립, 실시 및 기록유지를 포함한 교육훈련절차를 갖출 것 ◦책임기술자와 시험․검사자의 분야별 자격기준 및 자격부여 절차를 갖출 것
5. 숙련도관리	◦시험․검사자에 대한 숙련도평가절차를 갖출 것 비고 : 숙련도평가는 시험․검사자간 비교시험, 책임기술자에 의한 시험․검사자의 수행능력평가 등 조직규모에 적절한 방법으로 할 수 있음.
6. 신청서 관리	◦품질시험 의뢰신청서의 접수, 검토, 보완, 변경 및 반려를 포함한 신청서검토절차를 갖출 것.
7. 시료 및 환경 조건관리	◦시험․검사를 위해 제공된 시료의 수령, 취급, 보호, 보관 및 처분을 포함한 시료관리절차를 갖출 것. 비고 : 시료의 수령시 봉인 확인은 사진, 체크리스트 등 적절한 방법으로 할 수 있음. ◦시험․검사결과에 영향을 미칠 수 있는 환경조건의 관리기준 설정, 관리, 측정 및 기록을 포함한 환경조건관리절차를 갖출 것 비고 : 시험․검사의 품질에 영향을 미치는 지역은 접근 및 이용을 통제할 수 있음
8. 구매관리	◦시험․검사와 관련된 시약, 소모품과 장비의 구매, 수령, 검사 및 보관을 포함한 구매관리절차를 갖출 것
9. 장비관리	◦시험․검사와 관련된 장비의 식별, 취급, 운송, 보관, 교정, 보정, 사용 및 유지관리를 포함한 장비관리절차를 갖출 것 ◦장비의 사용에 관한 지침(장비제조자가 제공한 매뉴얼 포함)을 갖추고 권한을 부여받은 자가 조작할 것
10. 시험․검사의 실시	◦고객의 시험․검사과정입회절차를 갖출 것 ◦시험․검사항목별로 시험․검사방법을 정하고 문서화할 것 - 시험․검사항목별로 시험․검사프로세스(절차)를 갖출 것. ◦시험․검사일지 및 원시데이터(Raw data)를 유지할 것
11. 시험․검사 결과의 검증	◦시험․검사가 유효한 방법 및 절차에 따라 적합하게 실시되었는지 여부를 확인하기 위한 검증절차를 갖출 것
12. 시험․검사 성적서 발급	◦성적서의 작성, 검토, 승인 및 발행을 포함한 시험․검사성적서관리절차를 갖출 것 ◦성적서를 수정하여 발급할 필요가 있는 경우 수정된 성적서임을 표시하고 대체하는 원본에 대한 설명을 포함할 것
13. 부적합사항의 관리	◦부적합 사항의 발견, 시정조치 및 예방조치를 포함한 부적합관리절차를 갖출 것 비고 : 부적합 사항은 숙련도 평가, 장비의 점검 및 교정, 시료 수령, 환경조건 측정, 구매품 검사, 시험․검사결과의 검증 단계에서 발견할 수 있음.

【별지 제1호 서식】

품질관리계획서 검토․승인서

1. 개 요
공 사 명
발 주 자
감 리 자
시 공 자
착 공 일		준공예정일
공사위치
공사금액		도급금액
품질관리계획서 문서번호
(주) 1. 검토결과 시정요구 사항이 있는 경우는 조치확인을 완료한 후 승인을 요청한다. 2. 이 요령의 검토사항은 일반적인 사항에 대한 것이므로 당해 공사의 규모, 특성, 중요도 등에 따라 필요한 검토사항을 추가하여 사용할 수 있다.
2. 결 과
판 정	□ 승인 □ 조건부승인(사유 : ) □ 시정 (사유 : )
승 인 자	소속 및 직위 : 성명 : (서명) 일자 : 년 월 일

3. 검토의견

검 토 자	소속 및 직위 : 성명 : (서명) 일자 : 년 월 일
조치 확인자	소속 및 직위 : 성명 : (서명) 일자 : 년 월 일

품질관리계획 작성기준	만 족	시정요구	조치확인
1. 건설공사 정보
2. 현장 품질방침 및 품질목표
3. 책임 및 권한
4. 문서관리
5. 기록관리
6. 자원관리
7. 설계관리
8. 건설공사 수행 준비
9. 계약변경
10. 교육훈련
11. 의사소통
12. 기자재 구매관리
13. 지급자재의 관리
14. 하도급 관리
15. 공사 관리
16. 중점 품질관리
17. 식별 및 추적
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리
19. 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리
20. 검사 및 시험, 모니터링
21. 부적합 공사의 관리
22. 데이터의 분석
23. 시정조치 및 예방조치
24. 자체 품질점검
25. 건설공사 운영성과의 검토
26. 공사준공 및 인계

4. 시정요구 사항

□ 품질관리계획서
요구사항		시 정 내 용
□ 기타 절차서 및 지침서, 시험계획서 등
문서명	시 정 내 용

5. 검토사항

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
1.	건설공사 정보 등 ◦ 건설공사와 관련된 공사개요 등 계약 일반현황에 관한 요약정보를 제공하고 있는가? ◦ 품질관리계획서에는 건설공사에 적용되는 프로세스와 프로세스간의 상호작용에 관한 관계도가 명시되어 있는가? ◦ 품질관리계획 요건 중 일부가 적용 제외된 경우에는 제외기준과 사유가 명시되어 있는가?
2.	현장 품질방침 및 품질목표 ◦ 현장대리인은 건설공사의 목적과 발주자의 기대 및 요구에 적절한 현장 품질방침 및 품질목표를 수립하였는가? ◦ 품질방침과 품질목표는 현장 조직내에서 의사소통되고 이해되도록 관리방법을 정하고 있는가? ◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안을 정하고 있는가?
3.	책임 및 권한 ◦ 현장대리인은 다음 사항에 대한 단위조직 및 공사 수행 구성원의 책임 및 권한을 부여하였는가? ▪개별 단위조직에 대한 활동의 계획, 실행 및 유지, 모니터링 ▪공사관련자간의 의사소통, 공유영역에서 일어나는 문제의 해결 ▪점검결과의 검토 ▪시정조치의 관리 ◦ 조직구성은 품질관리, 공사, 공무, 관리 등을 고려한 최적의 형태인가?
비고 : 각 항목에서 검토사항을 추가할 필요가 있을 경우 추가․검토할 수 있음

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
4.	문서관리 ◦ 다음 사항을 포함한 문서관리 방법을 정하고 있는가? ▪문서의 작성, 검토, 승인, 등록, 배포, 개정 및 폐기 ▪문서 유효본의 검색 및 활용 가능성 ▪전자문서의 관리 ▪보유하고 있는 구문서의 식별 ◦ 문서관리에는 내부생성 문서 및 외부출처 문서가 포함되어 있는가? ◦ 품질관리계획서는 권한을 가진 자에 의해 검토, 승인되었는가?
5.	기록관리 ◦ 다음 사항을 포함한 기록관리 방법이 정해져 있는가? ▪보유기간, 보유 장소, 책임자 ▪식별, 보관, 보호, 처분, 기밀유지 방법 ▪열람 및 검색방법 ▪전자기록의 관리 ▪공사 관련자에게 제공하여야 할 기록의 종류, 시기 및 방법 ◦ 기록의 보유기간 적정한가?(필요시 법적 및 규제요구사항의 충족 여부)
6.	자원관리 ◦ 인적자원을 관리하기 위한 방법을 정하고 있는가? ◦ 물적자원(기반구조 및 작업환경)을 관리하기 위한 방법을 정하고 있는가?

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
7.	설계관리(설계시공일괄입찰 등 해당하는 경우 적용) ◦ 설계계획(조직적 및 기술적 연계성 구축 포함)의 수립 및 관리방법을 정하고 있는가? ◦ 설계입력기준의 결정 및 문서화 방법을 정하고 있는가? ◦ 설계출력물의 관리를 정하고 있는가? ◦ 설계검토, 설계검증, 설계타당성확인의 항목 및 방법을 정하고 있는가?
8.	건설공사 수행 준비 ◦ 건설공사 수행과 관련된 요구사항을 검토하는 시기, 방법 및 책임자를 정하고 있는가? ◦ 상충되거나 모호한 요구사항, 현장 실정과 부합되지 않는 요구사항의 해결방법을 정하고 있는가? ◦ 건설공사 수행과 직접적으로 관련된 제반 준비사항에 대한 관리방법을 정하고 있는가?

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
9.	계약변경 ◦ 설계변경을 포함한 계약변경의 요청 및 처리방법을 정하고 있는가? ◦ 계약이 변경되는 경우, 관련 문서가 수정되고 관련 인원이 변경된 요구사항을 인식하도록 하는 방법을 정하고 있는가?
10.	교육훈련 ◦ 다음 사항을 포함한 교육훈련 방법을 정하고 있는가? ▪교육훈련의 필요성 파악 ▪교육훈련계획의 수립 ▪교육의 실시(비정기 교육 포함) ▪교육훈련결과의 보고 ▪교육훈련의 효과성 평가 ◦ 교육훈련의 적용대상에는 하도급자, 기능공을 포함한 모든 공사참여자가 대상이 되는가?
11.	의사소통 ◦ 다음 사항에 대한 내부 및 외부의사소통을 위한 효과적인 방법을 정하고 있는가? ▪요구사항 및 정보의 교환 ▪공사관계자간 조직적 및 기술적 연계성 ▪부적합 사항, 부적합공사 등 당면문제의 해결 ▪건설공사 관계자의 불평, 이에 대한 후속활동 ▪비상시 대비 및 대응 ▪공사관련자 회의체 ◦ 의사소통은 내부 및 외부 관계자로부터의 의견접수, 검토, 전달, 문서화 및 회신을 포함하고 있는가?

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
12.	기자재 구매관리 ◦ 다음 사항을 포함한 기자재 구매관리 방법을 정하고 있는가? ▪기자재 수급계획 수립 ▪구매정보의 제공 ▪발주방법 ▪기자재의 검사 및 시험, 또는 검증, 유지관리방법 ▪부적합인 경우, 처리하기 위한 방법 ▪공장검사가 필요한 제작품의 경우, 검증계획 및 출하방법을 발주서에 명시
13.	지급자재의 관리(지급자재가 있는 경우 적용) ◦ 다음 사항을 포함한 지급자재의 관리 방법을 정하고 있는가? ▪지급자재의 파악 및 수급계획 ▪지급자재의 검사 및 시험, 또는 검증결과 부적합인 경우 처리하기 위한 방법 ▪인수후 발견된 부적절한 사항의 보고 및 처리방법 ▪입체 또는 대체 사용이 필요한 경우의 처리방법 ▪잉여지급자재의 처리방법

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
14.	하도급 관리 ◦ 다음 사항을 포함하여 하도급된 공종의 관리업무를 정하고 있는가? ▪하도급 계획 수립 ▪하도급자의 평가, 선정 ▪하도급 계약과 관련된 요구사항의 결정 ▪하도급 계약 체결 방법 ▪하도급자에게 제공되는 지원업무의 범위 ▪하도급된 공종에 대한 검사 및 시험, 검증과 모니터링 방법 ▪필요한 기록의 종류, 제출시기 및 방법
15.	공사 관리 ◦ 건설공사 수행과 직결되는 공사 관리업무를 정하고 있는가? ▪시공관리(시공계획 수립 포함) ▪필요한 경우 작업지침의 수립 ▪공정관리 ▪공사진도관리(부진공정만회대책 및 수정공정계획의 수립 포함) ▪안전관리 및 환경관리 ▪시공상세도, 준공도 관리

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
16.	중점 품질관리 ◦ 다음 사항을 포함한 중점 품질관리 대상의 관리업무를 정하고 있는가? ▪중점 품질관리 대상의 결정 ▪작업에 이용되는 장비에 대한 기준 및 승인 ▪작업자에 대한 자격기준 및 자격인정 ▪특정방법, 절차의 사용 및 모니터링
17.	식별 및 추적 ◦ 다음 사항을 포함한 식별 및 추적에 대한 관리업무를 정하고 있는가? ▪식별 대상의 결정 및 식별방법 ▪추적 요구사항을 고려한 추적대상의 파악, 추적의 범위, 정도 및 방법 ▪기자재와 공사 목적물에 대한 검사 및 시험상태의 식별방법 ◦ 선정된 식별 및 추적대상과 방법은 적절한가?
18.	기자재 및 공사 목적물의 보존관리 ◦ 다음 사항을 포함한 기자재 및 공사 목적물의 보존에 대한 관리업무를 정하고 있는가? ▪기자재의 운반 및 투입에 있어 필요한 특별한 취급방법 ▪기자재의 품질유지를 위한 보관장소 및 보관방법, 그리고 반입과 반출방법 ▪시공된 공사 목적물의 품질보호 방안 ▪화재 및 보안관리

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
19.	검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리 ◦ 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리는 임대 또는 대여하여 사용하거나, 하도급자 또는 개인이 사용하는 장비를 포함하고 있는가? ◦ 다음 사항을 포함한 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리업무를 정하고 있으며, 적절한가? ▪필요한 장비의 결정 및 확보 ▪검교정 실시, 장비의 사용여부 판단, 교정상태 식별 ▪고유한 식별, 취급, 유지보전 및 보관방법 ▪장비의 점검주기, 점검기준 및 점검방법 ▪장비가 요구사항을 벗어난 경우, 이전 결과의 유효성 평가 방법 및 필요시 적절한 조치
20.	검사 및 시험, 모니터링 ◦ 다음 사항을 포함한 검사 및 시험, 모니터링에 대한 관리업무를 정하고 있는가? ▪품질시험계획의 수립 및 수행주체 기술 ▪검사 및 시험계획의 수립 ▪검사 및 시험항목, 합격판정기준, 빈도, 사용되는 장비 및 기법, 책임자 ▪필요한 경우, 발주자 또는 감리자의 입회와 검증의 시기, 장소 및 방법 ▪검사 및 시험, 모니터링의 실시 및 결과 보고 ◦ 수립된 검사 및 시험계획은 적절한가?

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
21.	부적합 공사의 관리 ◦ 다음 사항을 포함한 부적합 공사의 관리업무를 정하고 있는가? ▪부적합 공사의 식별 ▪부적합 공사의 상태에 대한 문서화 ▪부적합 공사에 대한 조치와 필요시 재검사의 실시 ▪현상사용의 경우, 권한자의 승인
22.	데이터의 분석 ◦ 건설공사 운영에 필요한 정보제공을 위하여 데이터 분석에 대한 관리업무를 정하고 있는가?
23.	시정조치 및 예방조치 ◦ 다음 사항을 포함한 시정조치 및 예방조치에 대한 관리업무를 정하고 있는가? ▪시정조치의 경우, 부적합의 검토 ▪부적합의 원인 결정 ▪부적합에 대한 조치의 필요성 평가 ▪필요한 조치의 실행 ▪취해진 조치의 검토

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
24.	자체 품질점검 ◦ 품질점검을 수행토록 정하고 있는가? ◦ 다음 사항을 포함한 자체 품질점검에 대한 관리를 정하고 있는가? ▪점검기준, 범위, 주기, 점검자 선정을 포함한 점검계획의 수립 ▪점검 수행방법 및 점검결과 보고 ▪필요한 경우, 부적합 사항의 시정 및 시정조치 수행 ▪취해진 후속조치의 검증 및 검증결과의 보고
25.	건설공사 운영성과의 검토 ◦ 건설공사 운영성과 검토를 수행토록 정하고 있으며, 필요시 건설공사 운영성과의 검토결과에 따라 후속조치를 하도록 정하고 있는가? ◦ 건설공사 운영성과 검토 대상은 다음 사항을 포함하고 있는가? ▪현장 품질방침 및 품질목표의 관리상태 ▪내부 및 외부 점검결과 ▪부적합 공사의 발생빈도 및 특성 ▪민원 및 발주자 불만사항 ▪시정조치 및 예방조치 상태 ▪건설공사 수행에 영향을 줄 수 있는 변경 사항 ▪문제점, 애로사항 및 개선을 위한 제안 ◦ 건설공사 운영성과를 검토하기 위한 관리업무를 정하고 있는가?

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
26.	공사준공 및 인계 ◦ 다음 사항을 포함한 공사준공에 관한 관리를 정하고 있는가? ▪필요한 경우, 시운전을 위한 계획 및 시운전 절차 수립 ▪준공검사의 신청 ▪해당되는 경우, 부적합공사에 대한 처리 ▪준공도면의 검토 및 제출 ▪준공표지의 설치 ◦ 다음사항을 포함한 인계에 관한 관리를 정하고 있는가? ▪시설물 인계 계획의 수립 ▪본사로 이관될 현장문서 및 기록의 파악 및 인계 ▪감리자 또는 발주자에게 인계할 현장문서 및 기록의 파악 및 인계