2023년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2023-20

담당부서

작성자

(건설본부/토목설계처)

(박재일/042-607-4566/10002554@kr.or.kr)

정 책 명

평택~오송 2복선화 건설사업

사업개요

및

추진경과

ㅇ 노선도

ㅇ 사업개요

- 사업목적 : 선로용량이 부족한 평택∼오송 구간 용량 확충을 위해 고속철도 복선을 추가로 건설(2복선화)하여 고속철도 이용객 편의 제고

- 사업기간 : 2020 ∼ 2027년

- 총사업비 : 3조 1,816억원

ㅇ 주요내용

- 경부고속선 평택~오송 간 46.4km 2복선 고속철도 신설

ㅇ 추진경과

- `16.08∼`17.12 : 사전타당성조사 시행(B/C 1.17, 공단)

- ‘17.09 : 예비타당성조사

- `19.01 : 국가균형발전 프로젝트 예타면제 대상사업 선정

- `19.02∼‘19.08 : KDI 사업계획적정성 검토

- `19.11 : 타당성조사 및 기본계획 착수

- `20.10∼‘21.04 : 사업계획적정성 재검토(KDI)

- `21.06. : 기본계획 고시(국토교통부고시 제2021-911호)

- `21.09∼ : 전 공구 T/K(5개 공구) 입찰공고

* 제4공구는 유찰 2회로 입찰공고를 재시행(‘21.11.15.)하여 사업추진

- `22.05∼ : T/K 실시설계 적격자 선정 후 실시설계 추진

- `22.05∼‘22.07 : 궤도·시스템분야 기본설계 착수

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
본사 건설본부	손병두	본부장	ˊ22.8.29∼현재	건설본부 사업 업무 총괄
	김종호	실장	ˊ22.9.1∼현재	설계실 사업 업무 총괄
	이명석	처장	`22.9.26∼현재	설계 사업 업무 총괄
	김성주	부장	`22.1.17∼현재	영남호남권 노반 설계 업무 총괄
충청본부	김용두	본부장	ˊ22.1.17∼현재	충청본부 소관사업 업무총괄
	한승우	단장	ˊ22.1.17∼현재	충청권사업단 소관사업 업무총괄
	송권	부장	ˊ21.4.19∼현재	평택~오송 2복선화 업무총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 국토부 철도국 : 철도건설과장 오송천, 담당사무관 이동호

ㅇ 공구별 업체 현황

구 분	제1공구	제2공구	제3공구	제4공구	제5공구
설계사	㈜삼안	㈜서현	㈜서현	㈜KRTC	㈜동부 엔지니어링
시공사	㈜대우건설	㈜에스케이에코플랜트	㈜태영건설	㈜동부건설	㈜쌍용건설
감리사	미정	미정	미정	미정	미정

추진실적

ㅇ `19.01 : 국가균형발전 프로젝트 예타면제 대상사업 선정

ㅇ `21.06. : 기본계획 고시(국토교통부고시 제2021-911호)

ㅇ `21.09∼ : 전 공구 T/K(5개 공구) 입찰공고

ㅇ `22.05∼ : T/K 실시설계 적격자 선정 후 실시설계 추진