2023년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2023-16

담당부서

작성자

(시설본부/시설개량처)

(김정호/042-607-3787/0223kjh@kr.or.kr)

사 업 명

영동선 상망천교 외 4개소 교량구조개선 기타공사

사업개요

및

추진경과

○ 노선도

○ 사업개요

- 사업목적 : 강원본부 관내 노후된 영동선 철도교량의 구조개선 공사를 통해 철도교량의 유도상화, 열차운행 안전확보 및 이용객 서비스 향상

- 사업기간 : 2020. 6. 25. ~ 23. 6. 24.(36개월)

- 사 업 비 : 312억원 (공사비 284/감리비 28)

○ 주요내용

- 영동선 5개 교량(상망천교, 소지천교, 소지리교, 소로리교,  옥천1교)의 구조개선(L=165.3m), 지장물 철거 및 복구

○ 추진경과

- 2014.12.31. : 철도시설 개량사업 중기(‘13~’19) 투자계획

- 2018. 6.26. : 실시설계용역 착수

- 2019.11.29. : 실시설계용역 준공

- 2020. 6.25. : 공사 착수

- 2020. 6.29. : 건설사업관리용역 착수

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
본사 시설본부	신형하	본부장	‘21. 5.20.∼현재	시설본부 사업 업무총괄
	윤증원	처장	‘22. 1.17.∼현재	시설개량사업 업무총괄
	김 훈	부장	‘23.1.18~현재	시설개량 사업관리
강원본부	양인동	본부장	‘22. 1.17.∼현재	강원본부 소관사업 총괄
	정종진	단장	‘22.11.16.~현재	시설관리단 소관사업 총괄
	김성용	부장	‘21. 9. 8.∼현재	시설개량사업 총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계사 : ㈜유신, ㈜케이알티씨

○ 시공사 : ㈜DL건설, ㈜국기

○ 감리사 : ㈜동명기술공단, ㈜서현기술단

추진실적

○ 2020. 6.25. : 공사 착수

○ 2020. 6.29. : 건설사업관리용역 착수

○ 2020. 8. 6. : 착수보고회 시행

○ 2020. 8.31. : 기준점 및 기존구조물 확인, 측량 시행

○ 2020.10.31. : 용지경계 측량, 부지임대 사용협의 및 인허가 신청

○ 2020. 11월 : 상망천교 임시건널목 설치

○ 2020. 12월 : 상망천교, 소지천교 작업장 설치, 기초파일 항타, 가시설 설치

○ 2021.  4월 : 상망천교, 소지천교 가설교량 설치

○ 2021.  5월 : 소지리교, 소로리교 작업장 설치, 기초파일 항타, 가시설 설치

○ 2021. 10월 : 소지리교, 소로리교 가설교량 설치, 소지천교 가설벤트, 상부(SF거더) 제작

○ 2021. 12월 : 소지리교 상부(EDGE거더) 제작, 공사용 우회도로 개설

○ 2022.  1월 : 옥천1교 공사용 가도 시공, 작업장 설치

○ 2022.  4월 : 옥천1교 가설교량 기초파일 항타

○ 2022.  6월 : 옥천1교 가설교량 설치

○ 2022.  8월 : 소지천교 신설교량 설치(SF거더)

○ 2022. 10월 : 상망천교, 소지리교, 소로리교 신설교대 설치(A1)

○ 2022. 12월 : 옥천1교 신설교대(A1, A2) 설치, 신설교각 설치(P2)