실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2020-12

담당부서

작성자

시설본부 / 시설개량처

김대현/042-607-3789/up4928@kr.or.kr

사 업 명

경부선 상동~밀양간 밀양강교 교량개량공사

사업개요

및

추진경과

ㅇ 노선도

ㅇ 사업개요

- 사업목적 : 밀양강을 횡단하는 밀양강교를 개량해 재해예방을 통한 안전성 및 기존 교량 노후화에 따른 시설개량으로 열차의 안전운행 확보

- 공사위치 : 경상남도 밀양시 용평동 일원

[서기(환) 381km040~383km660]

- 공사규모 : 907억원

- 공사기간 : 2017.12 ~ 2022.9(58개월)

ㅇ 주요내용

- 총 연장 : L=2,620m

·토공 : 깍기 11만㎥, 쌓기 14만㎥

·교량 : 2개소/696m(밀양강교 656m, 용평교 40m)

·가교 : 3개소/821m

·철거 : 기존교량 철거 2개소, 기존노선 철거

·기타 : 경비처소 2개소 이전·신축

ㅇ 추진경과

- 2016.02~2017.07.   노반·궤도 실시설계 완료

- 2017.12.   노반공사 계약 및 착수

- 2018.01.   건설사업관리용역 계약 및 착수

- 2018.03   사업실시계획 승인

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
시설본부	김영하	본부장	ˊ18.4.~현재	업무총괄
	김용길	처장	‘20.01~현재	사업총괄
	윤증원	부장	ˊ18.03.~현재	계획 및 관리
영남본부	이인희	본부장	ˊ19.09~현재	영남본부 사업총괄
	민경화	처장	ˊ20.01.~현재	영남본부 시설사업총괄
	김대근	부장	ˊ20.01.~현재	영남본부 시설사업관리

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 감리사 : 동부엔지니어링(주) 외 2

ㅇ 시공사 : 코오롱글로벌(주) 외 1

ㅇ 설계사 : ㈜동명기술공단종합건축사사무소 외 2

추진실적

ㅇ 순성토 운반 및 쌓기 설계 성토 물량 156,606㎥ 완료

ㅇ 밀양강교 교각 P1~P5, P8~P9 구조물 완료

ㅇ 상부 SB아치 제작 설계량 5,297ton 중 4,682ton 제작 및 거치(2span)

ㅇ 밀양강교 교대 A1 구체 완료

ㅇ 용평교 교대 A1, A2 구체 완료

ㅇ 밀양강교 P10, P11 가시설 설치