서해선 복선전철 공정률(22년 8월말 기준)

분야		공정률(%)
계		86.3
설계		58.0
감리		66.0
용지		96.3
노반	1공구	99.3
	2공구	96.4
	3공구	99.3
	4공구	91.3
	5공구	97.2
	6공구	92.2
	7공구	100.0
	8공구	100.0
	9공구	96.9
	10공구	93.0
	기타	90.8
	소계	95.5
궤도		81.2
건물		82.2
전력		64.1
통신		33.0
신호		47.0
차량기지		58.4
부대		60.0