보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다	자료배포일 2015. 06 08.(월)	총 매수 3 매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 호남본부 시설처 / 처장 윤충원, 부장 김종수 (061-840-5021)
철도공단, 호남선․전라선 등 5개 노선에 재해예방시설공사 추진 - 약65억 원 사업비를 투입해 올해 말까지 공사완료 계획 -

□ 한국철도시설공단 호남본부장(본부장 이현정)은 풍수해 등 자연재해를 사전에 예방하기 위해 약65억원의 사업비를 투입해 호남선, 전라선 등 5개 노선 29개소에 재해예방 시설공사*를 추진한다고 밝혔다.

* 재해예방시설(29개소) : 호남선(12), 전라선(3), 경전선(11), 광주선(2), 여천선(1)

□ 이번에 시행하는 공사중 옹벽설치는 호남선 김제~신태인 구간 등 13개소, 배수로는 전라선 서도~산성 구간 등 17개소,  비탈면 보호공은 호남선 신태인~정읍 구간 등 5개소로서, 이달부터 본격적인 공사를 착수하여 금년 12월까지 완료할 계획이며 특히, 상습 침수 및 비탈면 유실우려가 있는 3개소*는 우기전인 7월까지 마무리할 예정이다.

* 붙임 : 재해예방 개소별 주요 공사 세부내용 1부.

□ 호남본부 관계자는 “금년에 재해예방 시설공사가 완료되면 열차의 안전운행 확보에 크게 기여함은 물론 선로에 인접된 농경지 침수피해 예방 등 지역주민의 농경활동에도 큰 도움이 될 것이다”고 전했다.

붙임		재해예방 개소별 주요공사 세부내용

연번	선 별	구 간	위 치	주 요 공 종	단위	수량
1	호남선	김제∼신태인	114km200(상우)	산마루측구(TYPE-1)	m	45
				깍기부도수로	m	9
				게비온옹벽 설치(H=2.0m)	m	42
2	호남선	김제∼신태인	115km400(상우)	산마루측구(TYPE-1)	m	64
				깍기부도수로	m	16
				게비온옹벽 설치(H=2.0m)	m	44
3	호남선	신태인∼정읍	123km070(하좌)	비탈면보호공(녹생토T=5cm)	㎡	89
				U형개거(600×600)	m	26
				집수정설치(1.0×1.0)	EA	1
				깍기부도수로	m	12
4	호남선	신태인∼정읍	124km200(하좌)	게비온옹벽 설치(H=2.0m)	m	10
				비탈면보호공(녹생토T=5cm)	㎡	208
5	호남선	신태인∼정읍	125km000(하좌)	비탈면보호공(녹생토T=5cm)	㎡	203
				산마루측구(TYPE-1)	m	39
				게비온옹벽 설치(H=2.0m)	m	19
6	호남선	익산역구내	역 외곽	개거덮개설치	m	100
7	호남선	백양사∼장성	150km800(상우)	U형개거(600×600)	m	73
				U형개거(1000×1000)	m	40
				U형개거(2000×1500)	m	86
				게비온옹벽 설치(H=2.0∼4.0m)	m	87
				흙막이 설치(H300×300×10×15)	m	128
				전기지장물이설	식	1
8	호남선	임곡∼하남	175km900 상,하선(좌우)	U형개거(600×600)	m	21
				집수정설치(1.0×1.0)	EA	1
9	호남선	임곡∼하남	원임곡육교하부 (하좌)	U형개거(600×600)	m	17
				U형개거(800×500)	m	48
				U형개거(1000×1000)	m	100
10	호남선	광주송정∼노안	189km612-189km923(하좌)	중력식옹벽(H=2.0m)	m	308
11	호남선	나주∼다시	203km458(교량)	교량배수시설 설치공사(상행)	EA	10
				교량배수시설 설치공사(하행)	EA	7
12	호남선	일로∼임성리	243km000(상우)	게비온옹벽 설치(H=2.0m)	m	10
13	전라선	서도∼산성 (우선 시공)	70km200(하좌)	U형개거(600×600)	m	10
				U형개거(800×800)	m	211
				종배수관(D=800mm)	m	13
				집수정설치(1.0×1.0)	EA	1
14	전라선	압록∼구례 (우선 시공)	110km000(상우)	흙막이 설치(H300×300×10×15)	m	96
				비탈면보호공(녹생토T=7cm)	㎡	397
				산마루측구(TYPE-1)	m	80
				J형측구(500×500)	m	97

연번	선 별	구 간	위 치	주 요 공 종	단위	수 량
15	전라선	괴목∼개운 (우선 시공)	134km000(하좌)	종배수관(D=800mm)	m	222
				집수정설치(1.2×1.2)	EA	8
16	경전선	순천～원창	183km810～184km280 (단좌,우)	게비온 옹벽	m	720
				L형 옹벽	m	72
				공사용 가도	식	1
				가시설 설치	식	1
17	경전선	순천～원창	190km040～190km176 (단좌,우)	석축 옹벽	m	160
				U형 수로	m	263
18	경전선	원창～벌교	194km200～194km500 (단좌)	J형 수로	m	300
				공사용 가도(B=4.0m)	m	333
19	경전선	조성～예당	214km700 (대곡천교)	사석채움	㎥	445
				스톤매트리스	㎡	143
20	경전선	예당～득량	222km100 (오봉천교)	사석채움	㎥	949
				스톤매트리스	㎡	459
				공사용 가도	m	101
21	경전선	보성～명봉	239km973 (단좌)	U형개거(0.6×0.6)	m	82
				U형개거(0.8×0.8)	m	24
				집수정(1.2×1.2)	EA	1
22	경전선	명봉～이양	246km650 (단우)	게비온 옹벽	m	77
				U형개거(0.6×0.6)	m	77
				흙막이 설치	m	77
				공사용 가도(B=4.0m)	m	42
23	경전선	능주～만수	260km050 (단좌,우)	U형개거(0.6×0.6)	m	43
				수로바닥 정지	㎡	300
24	경전선	이양～능주	264km400(단좌)	U형개거(0.5×0.5)	m	147
25	경전선	화순～남평	277km822～277km968 (단좌,우)	게비온 옹벽	m	304
				공사용 가도	식	1
				가시설 설치	식	1
26	경전선	남평～효천	287km880 (단우)	U형개거(0.6×0.6)	m	191
				U형개거(0.6×0.6)	m	340
				집수정(1.2×1.2)	EA	7
27	광주선	극락강～광주	7km640～8km011 (단우)	중력식 옹벽	m	371
				엄지말뚝	본	185
28	광주선	극락강～광주	8km064～8km360 (단우)	중력식 옹벽	m	237
				엄지말뚝	본	115
29	여천선	적량～칠비	13km590～13km780 (단우)	격자틀+앵커공	공	289
				비탈수로	m	123
				산마루측구	m	168