KRQP C-10050

Rev.10, 15. July 2024

상부구조물 설계

2024. 7.

REVIEW CHART

개정 번호	개정 일자	개정사유 및 내용(근거번호)	작성자	검토자	승인자
0	2014.12.31	신규제정	류완상	김대원 백효순	이동렬
1	2015.12.31	2015년 하반기 건설공사표준품셈 변경분 반영	백진호	손병두 백효순	이동렬
2	2016.12.31	2016년 하반기 건설공사표준품셈 변경분 반영	백진호	손병두 백효순	김영하
3	2017.05.29	2017년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	이만수 백효순	김영하
4	2017.09.12	2017년 하반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	이만수 백효순	김영하
5	2018.03.19	2018년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	조순형 백효순	김영하
6	2019.04.02	2019년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	민병균 박진용	손병두
7	2021.12.29	공단 명칭, CI 변경 분 반영	한익표	이창현 심형환	유성기
8	2022.06.03	2022년 건설공사 표준품셈 변경분 반영	한익표	이창현 심형환	유성기
9	2023.03.31	2023년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	한익표	안기성 이창현	김종호
10	2024.07.15	2024년 상반기 건설공사표준품셈 변경분, 감사처분 반영	임승빈	백효순 지연희	손병두

KRQP C-10050

목   차

Ⅰ. 수량조서(예시)	1

Ⅱ. 수량산출(예시)	2

1. 상부슬래브	2

Ⅲ. 단가산출(예시)	4

RECORD HISTORY	11

Ⅰ. 수량조서(예시)

KRQP C-10050

-  -

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
1	상부슬래브
1.01	콘크리트타설
a	콘크리트타설	철근,펌프차사용	㎥	1
1.02	거푸집
a	유로폼	벽체,복잡H=0～7m	㎡	1
b	합판거푸집	3회,H=0～7m	㎡	1
c	문양거푸집	판넬	㎡	1
1.03	구조물동바리
a	강관동바리	3개월
a-1	강관동바리	H=2.5m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함
a-2	강관동바리	H=2.5m초과~3.5m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함
a-3	강관동바리	H=3.5m초과~4.2m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함
b	슬래브거푸집받침대설치	교량용,3개월, 50×50×2.3T	공/㎥	1
1.04	신호통신전력관
a	신호통신전력관	PVC PIPE,D100mm	m	1
b	신호통신전력관	STS각관,400×150mm	m	1
1.05	슬래브면고르기	데크피니셔	㎡	1
1.06	스페이서설치
a	스페이서설치	벽체용	㎡	1
b	스페이서설치	슬래브 및 기초	㎡	1
1.07	철근현장가공및조립	Type-Ⅰ-1	ton	1
1.08	가로보횡빔철근용접	필렛,횡향,T=7㎜	m	1
1.09	교면 방수공
a	교면방수	침투식액체	㎡	1
b	교면방수	도막식	㎡	1
c	교면방수	Sheet방수,T=4mm	㎡	1
d	교면방수	Sheet방수,T=4mm, 보호아스콘	㎡	1

-  -

Ⅱ. 수량산출(예시)

Ⅱ-1. 상부슬래브

가. 콘크리트 타설

1) 콘크리트타설 - 철근, 펌프차사용

가) 콘크리트 펌프차를 이용한 타설로, 붐타설이 적용가능한 구간에 적용한다.

나) 체적으로 수량을 산출한다.

다) 시설유형 적용기준에 따라 구분하여 적용한다.

구 분	시설유형 적용기준
TYPE-Ⅰ	매트기초 등 펌프차 작업에 제약이 없는 시설물
TYPE-Ⅱ	벽, 기둥, 보, 슬라브, 교대, 교각 등 펌프차 작업에 큰 지장이 없어 일반적인 시공이 가능한 시설물
TYPE-Ⅲ	옹벽, 줄기초, 슬래브 없는[월거더]구조의 기둥과 보 등 펌프차 작업에 제약을 받는 타설부위가 좁거나 깊은 시설물
TYPE-Ⅳ	절/성토부 비탈면에 시공되는 구조물 등 펌프차 작업에 제약이 매우 큰 시설물

나. 거푸집

1) 유로폼 - 벽체,복잡,H=0～7m(㎡)

가) 콘크리트 타설면의 면적으로 수량을 산출한다.

나) 0∼7m를 기준으로 매 3m 증가마다 수량을 별도 산출한다.

다) 유로폼의 인력투입은 아래표를 기준으로 하며, 구조물 형상 또는 현장 조건에 제한을 받는 경우에는 이를 고려하여 결정할 수 있다.

구분	유 형
복잡	토목 : 교대, 날개벽 등 복잡하고 보강이 많은 구조 건축 : 외부 벽체, 보/기둥
보통	측구, 수로, 옹벽, 일반적인 벽체, 박스 등
간단	수문 또는 관의 기초, 건축 매트기초 등 간단한 구조

2) 합판거푸집 - 3회, H=0～7m(㎡)

가) 콘크리트 타설면의 면적으로 수량을 산출한다.

나) 슬래브 구체거푸집에 적용한다.

다) 구조물 형상에 따른 사용횟수와 유형은 아래 표를 고려하여 결정한다.

사용횟수	유형	구 조 물
1∼2회	제물치장	제물치장 콘크리트
2회	매우복잡	T형보, 난간, 복잡한 구조의 교각, 교대, 수문관의 본체 등 매우 복잡한 구조
3회	복잡	교대, 교각, 파라펫트, 날개벽 등 복잡한 벽체 구조 건축 라멘구조의 보, 기둥
4회	보통	측구, 수로, 우물통 등 비교적 간단한 벽체 구조, 교량 및 건축 슬래브
6회	간단	수문 또는 관의 기초, 호안 및 보호공의 기초 등 간단한 구조

3) 문양거푸집 - 판넬(㎡)

가) 콘크리트 타설면의 면적으로 수량을 산출한다.

나) 슬래브의 구체거푸집 중 미관을 고려해야할 부분에 적용한다.

다) 거푸집 설치(합판, 유로폼 등) 수량은 별도로 산출한다.

다. 구조물동바리

1) 강관동바리 - 3개월

가) 강관동바리 :  H=2.5m이하(공/㎥)

나) 강관동바리 :  H=2.5m초과∼3.5m이하(공/㎥)

다) 강관동바리 :  H=3.5m초과∼4.2m이하(공/㎥)

가)∼다) 공통

(1) 수량은 공/㎥(체적)로 산출한다.

(2) 멍에간격을 기준하여, 설치간격 (0.6m이하, 0.6m초과∼0.8m이하, 0.8m초과)에 따른 수량을        별도로 산출한다.

2) 슬래브거푸집받침대설치 - 3개월, 50×50×2.3T(공/㎥)

가) 수량은 공/㎥(체적)으로 산출한다.

라. 신호통신전력관

1) 신호통신전력관 - PVC PIPE,D100mm(m)

2) 신호통신전력관 - STS각관,400×150mm(m)

1)∼2) 공통

가) 설치연장으로 수량을 산출한다.

마. 슬래브면고르기

1) 슬래브면고르기 - 데크피니셔(㎡)

가) 슬래브의 상부 면적으로 한다.

바. 스페이서설치

1) 스페이서 설치 - 벽체용(㎡)

2) 스페이서 설치 - 슬래브 및 기초용(㎡)

1)∼2) 공통

가) 수량은 스페이서 설치 면적으로 산출한다.

사. 철근현장가공 및 조립

가) 철근현장가공조립 – Type-Ⅰ-1(ton)

수량은 도면(구조도)에 의해 산출된 철근의 NET ton수로 한다.

아. 가로보 횡빔철근 용접 - 필렛,횡향,T=7mm(m)

1) 가로보 도면을 참조하여 용접수량을 산출한다.

자. 교면방수공

1) 교면방수 - 침투식액체(㎡)

2) 교면방수 - 도막식(㎡)

3) 교면방수 - Sheet방수, T=4mm(㎡)

4) 교면방수 - Sheet방수, T=4mm, 보호아스콘(㎡)

1)∼4) 공통

가) 슬래브의 상부 면적으로 한다.

Ⅲ. 단가산출(예시)

- 단가적용시 현장여건에 따라 작업효율, 적용장비, 운반거리 등을 고려하여야 하며, 건설공사 표준 품셈의 개정, 공단기준의 변경 등을 반영한 최신의 품을 적용하여야 한다.

번호

공      종

단위

단 가 산 출 (예 시)

비  고

1

상부슬래브

1.01

콘크리트타설

a

콘크리트타설

(철근,펌프차,슬럼프15cm,

Type-Ⅱ)

㎥

1. 적용범위

본 품은 콘크리트펌프차(80㎥/hr이상)를 활용한 콘크리트

타설에 적용하며 나머지 조건은 건설표준품셈을 참고하여

슬럼프치, 시설유형 및 현장조건에 따라 조정할 수 있다.

2. 일일시공량

(일당)

슬럼프	기준 시공량(㎥)
	무근구조물	철근구조물
8~12cm	130	125
15cm	135	130
18cm이상	145	140

가. 시공량(㎥) : 기준시공량 × f1(시설유형) × f2(현장조건)

※ 펌프차의 타설범위(타설높이 및 수평거리)를 초과하여

펌프차 이동 및 재셋팅이 필요한 경우 회당 시공량의

5%을 감하여 적용한다.

나. 시설유형(f1)

유형	Type-Ⅰ	Type-Ⅱ	Type-Ⅲ	Type-Ⅳ
f1	1.4	1.0	0.8	0.3

다. 현장조건(f2)

유형	조건-1	조건-2	조건-3
f2	1.2	1.0	0.8

∴ Q(시공량)= 130㎥/일 × 1.0(f1) × 1.0(f2) = 130.0㎥/일

3. 인력 및 장비 편성

1) 노무비

가. 콘크리트공 : 4인/일 / Q㎥/일

나. 특별인부 : 2인/일 / Q㎥/일

다. 보통인부 : 1인/일 / Q㎥/일

* 본 편성인력은 콘크리트 진동기 사용 기준으로

진동기를 사용하지 않는 경우 콘크리트공과 특별

인부를 각 1인 제외한다.

2) 콘크리트펌프차(80㎥이상)

: 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

3) 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의

기계경비는 : 노무비의 5%

4. 양생비(철근)

1) 보통인부:0.07인/10㎥=0.007인

2) 제잡비(양생손료,기구손료):인력품의 41%

[공통] 6-1-4

콘크리트

펌프차타설

2016년건설

표준품셈     6-1-2-2 양생비

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
1.02	거푸집
a	유로폼 (벽체,복잡,H=0～7m)	㎡	1. 유로폼(H = 0∼7m이하) 1) 재료비 - 패널(600×1200㎜):0.89매/10㎡ - 내부패널((200+200)×1,200㎜):0.03매/10㎡ - 부자재(웨지핀, 플랫타이, 강관파이프, 후크) : 주자재비의 79% - 소모재료(박리재 등) : 주자재비의 5% 2) 설치 및 해체(복잡) ∴ Q(시공량) = 25㎡/일 ① 형틀목공: 4인/일 / Q㎡/일 ② 보통인부: 1인/일 / Q㎡/일 ③ 공구손료 및 경장비 기계경비:인력품의 3% ※ 참조 - 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.	[공통]6-3-3 유로폼 설치및해체
b	합판거푸집 (3회,H = 0～7m)	㎡	1. 합판거푸집(H=0∼7m이하) 1) 재료비 - 합판(12㎜):1.030㎡×32.7/100 - 각재:0.038㎥×32.7/100 - 소모자재(박리재 등):주자재비의 11%적용 2) 설치 및 해체(6회,간단) ∴ Q(시공량) = 50㎡/일 ① 형틀목공: 5인/일 / Q㎡/일 ② 보통인부: 2인/일 / Q㎡/일 ③ 공구손료 및 경장비 기계경비:인력품의 1% ※ 참조 - 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.	[공통]6-3-1 합판거푸집 설치및해체
c	문양거푸집 (판넬)	㎡	1. 거푸집설치(합판, 유로폼 등)는 별도 계상한다. 2. 재 료 비(1회사용) 1) 문양거푸집: 1.0㎡ 2) 잡재료 및 소모재료비(고정못 등): 주재료비의 2% 3. 설치 및 해체 - 형틀목공 : 0.07인 - 보통인부 : 0.03인	[공통]6-3-4 문양거푸집 (판넬) 설치및해체

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
1.03	구조물동바리
a	강관동바리
a-1	강관동바리 (3개월, H=2.5m이하)	공/㎥	1. 강관동바리(설치간격0.6m초과~0.8m이하) 1) 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 - 잡재료 및 소모재료(고정못 등) : 주재료비의 5% 2) 설치 및 해체 - 형틀목공 : 0.54인/10(공/㎥) = 0.054인/공/㎥ - 보통인부 : 0.21인/10(공/㎥) = 0.021인/공/㎥	[공통]2-6-1 강관동바리 설치및해체 (토목)
			2. 강관동바리(설치간격0.6m이하) 1)재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2)노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 120%적용
			3. 강관동바리(설치간격0.8m초과) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 90%적용
a-2	강관동바리 (3개월, H=2.5m초과∼3.5m이하)	공/㎥	1. 강관동바리(설치간격0.6m초과~0.8m이하) 1) 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 - 잡재료 및 소모재료(고정못 등) : 주재료비의 5% 2) 설치 및 해체 - 형틀목공 : 0.58인/10(공/㎥) = 0.058인/공/㎥ - 보통인부 : 0.23인/10(공/㎥) = 0.023인/공/㎥	[공통]2-6-1 강관동바리 설치및해체 (토목)
			2. 강관동바리(설치간격0.6m이하) 1)재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2)노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 120%적용
			3. 강관동바리(설치간격0.8m초과) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 90%적용
a-3	강관동바리 (3개월, H=3.5m초과∼4.2m이하)	공/㎥	1. 강관동바리(설치간격0.6m초과~0.8m이하) 1) 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 - 잡재료 및 소모재료(고정못 등) : 주재료비의 5% 2) 설치 및 해체 - 형틀목공 : 0.63인/10(공/㎥) = 0.063인/공/㎥ - 보통인부 : 0.25인/10(공/㎥) = 0.025인/공/㎥	[공통]2-6-1 강관동바리 설치및해체 (토목)
			2. 강관동바리(설치간격0.6m이하) 1)재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2)노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 120%적용
			3. 강관동바리(설치간격0.8m초과) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 90%적용

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b	슬래브거푸집받침대(교량용, 3개월50×50×2.3T)	공/㎥	1. 슬래브거푸집받침대설치(교량용,50×50×2.3T) ※ 한국철도시설공단 교량상부 슬래브 동바리 발주방법 개선안 참조 ※ 목재동바리로 상부거푸집을 지지하도록 설계함에 따라 동바리 소요량은 1Span당 343 공/㎥로 계상하였음. 2. 슬래브 거푸집 받침대 설치(본체,25m/Span) 1) 재 료 비 행거파이프(ㅁ-50×50×2.3T,손료6%적용): 12.6 m 각재(90×90,손료30%적용): 0.729 ㎥ Wedge Pin(4.5T×85):400 개 노치플레이트(2.3T,W=29): 400 개 행거볼트 및 너트: 400 개 2) 설치비 형틀목공(4명,2일,실투입인원): 8 인 크레인(25ton): 8hr 3) 해체비(설치비의 80%적용) 3. 슬래브 거푸집 받침대 설치(캔틸레버폼 ,25m/span) 1) 재료비 캔틸레버폼(강재,임대):100개 2) 설치비 형틀목공(4명,2일,실투입인원): 8인 크레인(25ton): 8hr 3) 해체비(설치비의 80%적용) 4. 적용공사비 : 산출공사비/343공/㎥	견적단가
1.04	신호 통신 전력관
a	신호통신전력관 (P.V.C Pipe,D100㎜)	m	1. 재료비(VG1,D100㎜):1.02m 2. 설치비 1) 보통인부:0.26인/6m = 0.043인/m 2) 배 관 공:0.10인/6m = 0.017인/m	[정보통신] 2-1-1 PVC관
b	신호통신전력관 (스텐레스,400×150㎜)	m	1. 재료비 1) 스테인리스판(T = 3㎜):28.786㎏ 2) 고재대(스텐레스):2.617㎏ 2. 운반비:28.786㎏ 3. 잡철물제작설치(간단) 1) 잡철물제작(간단): 0.026ton 2) 잡철물설치(간단): 0.026ton	[건축]8-4-1 각종잡철물 제작설치

번호

공      종

단위

단 가 산 출 (예 시)

비  고

1.05

슬래브면고르기

a

데크피니셔

㎡

1. 작업량산출

1) 콘크리트타설량

(일당)

슬럼프	기준 시공량(㎥)
	무근구조물	철근구조물
8~12cm	130	125
15cm	135	130
18cm이상	145	140

가. 시공량(㎥) : 기준시공량 × f1(시설유형) × f2(현장조건)

※ 펌프차의 타설범위(타설높이 및 수평거리)를 초과하여

펌프차 이동 및 재셋팅이 필요한 경우 회당 시공량의

5%을 감하여 적용한다.

나. 시설유형(f1)

유형	Type-Ⅰ	Type-Ⅱ	Type-Ⅲ	Type-Ⅳ
f1	1.4	1.0	0.8	0.3

다. 현장조건(f2)

유형	조건-1	조건-2	조건-3
f2	1.2	1.0	0.8

∴ Q(시공량)= 130㎥/일 × 1.0(f1) × 1.0(f2) = 130.0㎥/일

시간당작업량 = 130㎥/일 / 8hr = 16.25㎥/hr

3) 슬래브두께:350mm

∴ 작업량:16.25㎥/hr/(350mm/1000) = 46.43㎡/hr

2. 콘크리트조면마무리기(7.95m):46.43㎡/hr

3. 레일설치

1) 수량산출

- 교량총연장:1000m(설계수량)

- 슬래브면적:10400㎡(설계수량)

2) H-형강(100×100×6×8mm)

-H형강:17.2㎏/m×2개×15%(손율)×1000m/10400㎡

=0.496㎏

3) 강판전기용접(필렛,T=6mm,하향)

- 수량산출:0.10m×2개×1000m/10400㎡ = 0.019m

4) 설치 및 해체

(1) 보통  인부:0.006인×1000m/10400㎡ = 0.0006인

[공통]6-1-4-3

콘크리트타설

1.06

스페이서설치

a

스페이서설치

(벽체)

㎡

1. 재료비:8개

2. 설치비(재료비의 5%)

b

스페이서설치

(슬래브 및 기초)

㎡

1. 재료비:4개

2. 설치비(재료비의 5%)

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
1.07	철근현장가공조립 (Type-Ⅰ-1)	ton	1. 현장가공 ∴ Q(시공량) = 4.5ton/일 1) 철 근 공: 3인/일 / Qton/일 2) 보통인부: 1인/일 / Qton/일 3) 공구손료 및 경장비(철근 가공기 등)의 기계경비 : 인력품의 9% 2. 현장조립 ∴ Q(시공량) = 3.5ton/일 1) 철 근 공: 6인/일 / Qton/일 2) 보통인부: 2인/일 / Qton/일 3) 공구손료 및 경장비의 기계경비 : 인력품의 2% 4) 결속선(#20 0.9㎜):6.50㎏ ※ 참조 - 개소별 소량(0.5ton미만)의 시공 위치가 산재하는 경우 시공량의 50%까지 감하여 적용한다. - 현장여건(고소작업, 철근 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다.	[공통] 6-2-2 현장가공 [공통] 6-2-3 현장조립
1.08	가로보횡빔철근 용접(필렛,횡향, T=7mm)	m	1. 재료비 1) 용접봉(KSE4301,D3.2mm):0.50㎏ 2) 전력요금:3.10㎾ 2. 노무비 1) 용 접 공:0.031인/30% = 0.103인 2) 특별인부:0.009인/30% = 0.030인 3) 기구손료(인력품의 5%)	[설비]13-2-3 강관용접 5.필렛용접
1.09	교면방수공
a	교면방수 (침투식액체)	㎡	1. 재료비 2. 표면처리 1) 연 마 공:0.01인 2) 보통인부:0.02인 3. 인 건 비 1) 방 수 공:0.02인 2) 보통인부:0.01인 4. 잡재료비(재료비의 2%) 5. 기구손료(인력품의 3%)	견적단가
b	교면방수(도막식)	㎡	1. 재료비(설계수량 적용) 2. 바탕처리 1) 방 수 공:0.036인 2) 보통인부:0.015인 3) 공구손료 및 경장비(엔진송풍기, 연마기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% 3. 방수프라이머 1) 프라이머(200ℓATSM D41):0.30ℓ 2) 방 수 공:0.011인 3) 보통인부:0.005인 4) 공구손료 : 인력품의 2% 4. 도막방수 바름 1) 방 수 공:0.015인 2) 보통인부:0.009인 3) 공구손료 : 인력품의 2% 5. 보 강 포 1) 방 수 공:0.010인 2) 보통인부:0.004인 6. 마감도료 1) 방 수 공:0.012인 2) 보통인부:0.005인 3) 공구손료 : 인력품의 2%	[건축]6-1-1 바탕처리 [건축]6-1-2 방수프라이머 바름 [건축]6-2-1 도막바름

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c	교면방수(Sheet 방수,T=4mm)	㎡	1. 재료비 1) Sheet 방수(T=4mm):1.20㎡ 2) 프라이머(200ℓ,ATSM D41):0.30ℓ 3) 부탄(LPG 공업용):0.08㎏ 4) 와이어메쉬(#8 D4.0×100×100):1㎡ 2. 노무비(바닥) 1) 방 수 공:0.06인 2) 특별인부:0.03인 3. 공구손료 및 경장비(토치 등)의 기계경비 : 인력품의 3%	[건축]6-3-1 가열식 시트붙임
d	교면방수(Sheet방수 +보호아스콘)	㎡	1. 재료비 1) Sheet 방수(T=4mm):1.20㎡ 2) 프라이머(200ℓ,ATSM D41):0.30ℓ 3) 부탄(LPG 공업용):0.08㎏ 4) 와이어매쉬(#8-50×50):1㎡ 2. 노무비(바닥) 1) 방 수 공:0.06인 2) 특별인부:0.03인 3. 공구손료 및 경장비(토치 등)의 기계경비 : 인력품의 3% 4. . 작업조건 ∴ 1일당 시공량 : 4,800㎡/일 ∴ 시간당 시공량 : 4,800㎡/일/8hr/일 = 600.00㎡/hr 5. 아스콘운반(#78,표층용) : 1.02(할증) × 0.06m = 0.0612㎡ 6. 인건비 1) 포 장 공 : 4인/일/8hr/일/600.00㎡/hr = 0.0008인/㎡ 2) 보통인부 : 1인/일/8hr/일/600㎡/hr = 0.0002인/㎡ 7. 기계사용료 1) 아스팔트피니셔(3m) : 600.00㎡/hr×1대 = 600.00㎡/hr 2) 머캐덤롤러(10∼12ton) : 600.00㎡/hr× 1대 = 600.00㎡/hr 3) 타이어롤러(8∼15ton) : 600.00㎡/hr× 1대 = 600.00㎡/hr 4) 탠덤롤러(5∼8ton) : 600.00㎡/hr×1대 = 600.00㎡/hr 5) 살수차(16,000ℓ) : 600.00㎡/hr×0.5대 = 300.00㎡/hr	[건축]6-3-1 가열식 시트붙임 [토목]1-5-5 표층기계포설 (기계)

RECORD HISTORY

Rev.0('14.12.31) 철도건설공사 수량 및 단가산출 표준의 구성체계를 KR CODE집에 맞추어 항목별 체계로 개정하여 사용자가 손쉽게 이용하는데 목적을 둠.

Rev.1('15.12.31) 2015년 하반기 건설공사 표준품셈 개정분을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.2('16.12.31) 2016년 하반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.3('17.05.29) 2017년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.4('17.09.12) 2017년 하반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.5('18.03.19) 2018년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.6('19.04.02) 2019년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.7('21.12.28) 공단 명칭, CI 변경분 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.8('22.06.03) 2022년 건설공사 표준품셈 개정분 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.9('23.03.31) 2023년 상반기 건설공사 표준품셈 개정사항 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.10('24.07.15) 2024년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분, 감사처분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공