KR형 접속부 침목 및 탄성패드 개발계획

공 개 설 명 회 (안)

□ 목적

KR형 레일체결장치의 실용화 확대·촉진 및 유지보수 호환성 향상과 기술자립을 통한 국산화를 위해 자갈/콘크리트궤도 접속부용 침목 및 탄성패드 개발을 추진하고자 개발 참여 희망업체를 대상으로 공개설명회 개최

□ 공개설명회 시행(안)

1. 일시 : 2019.4.16.(화) 13:00∼

2. 장소 : 공단 본사 601호 회의실

3. 참석대상 : KR형 접속부 침목, KR형 체일체결장치용 탄성패드(강성체감용) 개발 희망업체 관계자

4. 주요내용

가. 공단과 참여업체간 공동개발 협약서(안) 설명

- 침목업체와 KR형 레일체결장치 업체가 공동으로 참여하여 개발

나. 개발내용(침목설계, 탄성패드 스프링계수 조정, 시제품제작 및 품질시험, 시험부설, 철도용품 형식승인)에 관한 사항

다. 개발방향에 관한 사항

- (침목) 기존 접속부 침목과 동등한 형상, 콘크리트궤도용은 래티스거더 적용

- (체결장치) KR형 레일체결장치(기본레일), e클립 레일체결장치(휨강성보강레일)

라. 시험부설

- 장 소 : 장항선개량 2단계 남포~간치 궤도공사 현장 터널 시·종점부 8개소

- 신청방법 : 침목개발업체에서 공동 참여할 탄성패드 개발업체를 명기하여 공문(신청서)으로 제출

* 제출처 : corlgus25@kr.or.kr,  담당자 : 042-607-3336(궤도처 차장 채기현)

- 신청기한 : 2019.4.17. 09:00부터∼2019.4.26. 12:00까지

* 신청기한 전/후에 제출된 신청서는 접수하지 않음

- 우선순위 : 신청순서에 따라 순차적 시험부설 장소 제공

- 기타사항 : 기존 레일체결장치(System300-1, SFC, VIPA)용 접속부 PSC침목의 형식승인을 위한 시험부설장소 제공 요청 시 차 순위로 제공

마. 비용분담

- (공 단) 시험부설 공사비 및 자재비 * 시공계약자가 자재비를 개발업체에 지급

- (참여업체) 침목설계, 시제품 제작, 품질시험, 철도용품 형식승인 및 제작자 승인 비용 등 일체

□ 향후 추진계획(첫 시험부설 일정 기준)

ㅇ '19. 4.30 : 공동개발 협약체결

ㅇ '19. 5.15 : 침목설계 완료(개발사에서 도면 및 구조계산서 제공, 공단에서 도면승인)

ㅇ '19. 5.30 : 침목몰드(형틀) 제작 완료

ㅇ '19. 6.30 : 침목 및 탄성패드 시제품 제작 완료(품질시험 포함)

ㅇ '19. 7월 : 시험부설 완료

<시험부설구간>

터널명	위치		시공일	비고
남포 제2터널	시점부	상선	’19.7.21	①
		하선	’19.7.11	②
남포 제3터널	종점부	상선	’19.11.20	⑧
		하선	’19.10.10	⑦
대창터널	시점부	단선	’19.8.15	⑤
	종점부	단선	’19.8.30	⑥
간치터널	시점부	단선	’19.8.5	③
	종점부	단선	’19.8.10	④