2024년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2024-08

담당부서

작성자

(시스템본부/시스템계획처)

(전상휘/042-607-3515/hwi@kr.or.kr)

정 책 명

장항선 도담~영천 복선전철화 사업

사업개요

및

추진경과

ㅇ 노선도

【‘27.12월 개통】

【‘24.6월 개통】

【‘08.12월 完了】

ㅇ 사업개요

- 사업목적 : 장항선의 신창~대야간 118.6km를 전철화하여 일관수송체계 구축으로 철도서비스 향상 및 주민교통편의 제공

- 사업기간 : 2018 ∼ 2027년

- 총사업비 : 8,428억원

ㅇ 주요내용

- 전  력 : 송변전 1식, 전철전력 118.6km

- 신  호 : ATP 200.95km, 전자연동장치 17역

- 통  신 : 광케이블 140.8km, 전송설비 13대

- 시  설 : 궤도부설 104.45km, , 건축 12동

ㅇ 추진경과

- `95.11.    「장항~군산간 타당성조사」

- `97.12.   「장항선 천안~장항간 기본조사」

- `02.11.~`03. 6.   익산～대야 복선전철화 예비타당성조사

- `04. 3.    국가물류체계 개선대책에 포함(재정경제부)

- `06. 3.   국가철도망구축계획 반영(국토해양부)

- `06. 5.   장항선(온양온천~군산) 예비타당성조사(KDI)

B/C=0.63(총사업비 9,156억원)

- `06.11.~`11. 2.   익산~대야 복선전철화 기본 및 실시설계

- `06. 6.    장항선(온양~군산) 복선전철화 사업 예비타당성조사

- `07.12.    온양온천~신례원, 주포~남포, 장항~군산 개통

- `08. 8.   장항선 2단계 개량사업 예비타당성조사(KDI)

B/C=0.92(총사업비7,870억원), AHP=0.572

- `11. 4.   제2차 국가철도망국축계획에 반영

- `11.11.    장항선 개량 2단계 타당성조사 및 기본계획(신창~  대야 복선전철화 타당성조사) 고시

- `17.11.   예비타당성조사 결과(B/C 1.03, KDI→기획재정부)

- ‘18.4.    실시설계 발주(궤도, 전력, 통신, 신호)

- ‘18.12.   신창~홍성(1단계) 실시설계 완료 및 총사업비 협의

- ‘20.01.   사업실시계획 승인(국토부 고시 제2019-860호)

- ‘21.02.   사업실시계획 변경 승인(국토부 고시 제2021-098호)

- ‘21.09.   KDI 사업계획 적정성 재검토 결과(웅천~대야 복선화) 총사업비 승인

- ‘22.03.   사업실시계획 변경(국토부 고시 제2022-158호)

- ‘23.04.   사업실시계획 변경(국토부 고시 제2023-203호)

- ‘23.10.   주포~대야 실시설계 완료 및 총사업비 협의

- ‘24.01.   2단계(홍성~대야) 사업실시계획 승인

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 처  장 박민주

- 최종 결재자 : 이사장 김상균

ㅇ 사업관련자

구 분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
시스템본부	구욱현	본부장 (직무대행)	‘23.07.∼현재	시스템본부 업무 총괄
	구욱현	처장	‘23.07.∼현재	전철화사업 총괄
	신이섭	부장	‘23.07.∼현재	전철화사업 담당
충청본부	김윤양	본부장	`23.07.∼현재	충청본부 관내 업무 총괄
	백효순	단장	`24.02.∼현재	사업단 업무 총괄
	조인애	차장	`24.02.∼현재	장항선 전철화사업 총괄
	노승준	부장	`22.09∼현재	장항선 전철화사업 전철전력업무 총괄
	한승호	부장	`23.07∼현재	장항선 전철화사업 신호통신업무 총괄
	문병주	부장	`23.07∼현재	장항선 전철화사업 궤도업무 총괄
	신진도	부장	`23.07∼현재	장항선 전철화사업 건축업무 총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 국토부 철도국 : 철도건설과장 오송천, 사무관 김은철

ㅇ 계약상대자

구 분	설계	공사	감리
궤 도	㈜동명기술공단종합건축사사무소	천운궤도㈜	㈜케이알티씨
	㈜유신	상경토건	-
		상경토건	-
건 축	청목건축사사무소	㈜대한	㈜종합건축사사무소근정
	(주)서한종합건축사사무소	-	-
송변전	㈜한국이알이시	㈜우석전기	벽산파워㈜
	동산엔지니어링(주)	㈜통광	-
전차선	세종기술㈜	㈜미동이엔씨	㈜디투 엔지니어링
		㈜삼영기업
	주식회사 배산엔지니어링	삼진일렉스	-
		㈜서우건설산업	-
		㈜기전사	-
전 력	㈜신우디엔시	세이콘㈜	㈜한국이알이시
		(유)일석	-
신 호	신우이엔지㈜	㈜에이알텍	㈜경인기술
		㈜이엑스쏠라
		㈜고려티에스아이
		㈜수원전기
	㈜에이알텍	세종텔레콤(주)	이호기술단(주)
		㈜영민
		세종텔레콤(주)
		㈜이엑스쏠라	㈜경인기술
		세종텔레콤(주)
		세종텔레콤(주)
통 신	㈜안세기술	㈜에스피엔이	㈜예향 엔지니어링
		㈜세움정보기술	㈜세영
		㈜이예스피
		㈜알이시스

추진실적

ㅇ ‘19. 12.  사업실시계획 승인(신창~홍성간)

ㅇ ‘19. 12.  전차선로공사 발주

ㅇ ‘20.  4.  궤도공사 발주

ㅇ ‘20.  6.  전력 및 통신, 건축공사 발주

ㅇ '20.  8.  웅천∼대야간 「사업계획 적정성 재검토」(KDI)

ㅇ '21.  7.  사업계획적정성 재검토 완료(KDI, 웅천~대야 복선전철화)

ㅇ '21.  8.  총사업비 심의(웅천~대야 복선전철 반영)

ㅇ '21. 12.  총사업비 심의(물가변동 반영)

ㅇ '22.  7.  신창~홍성 복선 비전철 개통(개통전 사용개시)

ㅇ '24.  1.  사업실시계획 승인(홍성~대야)

ㅇ ‘24.  1.  주포~대야 궤도, 전차선로, 전력, 신호, 통신공사 착공