報告		수도권고속철도 (수서~평택) 건설사업 공정률

수도권고속철도건설단 (☏6181-3501)

(공정률 산정 기준 : ‘15. 1.28)

구 분		공사내용	시공사	공정률(%)	비고
총 체		< 고속철도 신설 61.1km >		66.0
노반	소계	* 터널 : 53.4km, 토공 등 : 7.7km * 정거장 5개소 : 고속철도 3개소, 광역철도 2개소		77.0
	1-1공구	수서정거장(KTX), 주박선 : 693m	코오롱글로벌	81.0
	1-2공구	터널 : 5,000m, 개착BOX : 387m	경남기업	67.3
	2공구	성남정거장(광역급행철도), 터널 : 8,200m	두산건설	57.4
	3-1공구	터널 : 5,685m	대우건설	74.0
	3-2공구	용인정거장(광역급행철도), 터널 : 5,911m	GS건설	69.5
	4공구	터널 : 5,101m	현대산업개발	94.7
	5공구	동탄정거장(KTX+광역급행철도), 터널 : 1.993m	삼성물산	67.5
	6-1공구	터널 : 5,670m	쌍용건설	75.5
	6-2공구	터널 : 8,690m	현대산업개발	81.7
	7공구	터널 : 3,520m, 개착터널 : 380m 토공 : 337m, U-TYPE : 363m	포스코건설	80.7
	8공구	지제정거장(KTX), 개착BOX : 100m 터널 : 772m, 개착터널 : 660m, U-TYPE : 406m	SK건설	93.6
	9공구	터널 : 2,380m, 개착BOX : 750m 토공 : 897m, U-TYPE : 492m	GS건설	88.9
궤 도		궤도부설 61.1km	KRTC (감리단)	20.1
건물	수서	연면적 : 8,557㎡, 규모 : 지하2층, 지상3층	코오롱글로벌	9.4
	동탄	연면적 : 48,524㎡, 규모 : 지하6층	-	‘15. 3월 착공예정
	지제	연면적 : 3,937㎡, 규모 : 지상3층	대우산업개발	5.4
	운전 기능 건물	변전소 2동(중원,오산), 신호기계실 4동 (성남,용인,마산,남산), 급전구분소 2동(기흥,평택), 급전소 3동(자곡,고매,지산)	한일건설 우방산업	38.6
송변전	수서~동탄	지중선로 1.2km/5.0km( 한전 동판교~SS중원SS), 변전설비 4개소(중원SS, 기흥SP, 자곡PP, 고매PP)	GS건설	61.8
	동탄~평택	지중선로 5.0km/5.2km( 한전 삼미SS~ 오산SS), 변전설비 3개소(오산SS, 평택SP, 지산PP)	미동이엔씨	83.3
전차선	수서~동탄	전차선/조가선 : 157km, 전철주/하수강 : 2,639본	삼원전력	16.5
	동탄~평택	전차선/조가선 : 172km, 전철주/하수강 : 1,819본	삼진일렉스	12.1
전력	수서~동탄	배전선로 41km, 배전소 11개소, 수전설비 2개소(수서,동탄), 저압배전소 7개소,	광성점업	0.3
	동탄~평택	배전선로 32km, 배전소 11개소, 수전설비 1개소(지제), 저압배전소 4개소,	GS건설	0.3
시스템	신호	ATC장치 7개소, CTC장치 통합 1식, 연동장치 6개소, 역기계실 설비 3개소	서우건설	1.5
	통신	통신선로 180km, 전송설비 17개소, 무선통신시스템 62.4km, 유도대책 3역	-	‘15. 3월 착공예정