보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2017. 6. 28.(수)	총 매수 2매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 기술본부 차량처 / 처장 최종호, 종합시운전부장 김형룡 (042-607-4522)
원주∼강릉 철도 시운전열차 투입 위한 정밀안전점검결과 이상 無 - 7월말 KTX를 투입하여 3개월 이상 시운전 시행예정 -

□ 한국철도시설공단(이사장 강영일)은 금년 12월 개통예정인 원주∼강릉 복선철도 구간의 종합시험운행 열차의 안전 확보를 위해 분야별 철도시설물의 사전점검을 시행한 결과 KTX를 투입하여 본격적인 시운전에 돌입하는데 문제가 없다고 밝혔다.

○ 철도공단은 철도유관기관의 전문 인력과 함께 사전점검 팀을 구성하여 노반, 궤도, 전차선, 신호 등 총 12개 분야 277개 항목에 대하여 6월1일부터 약 1달간 시운전열차가 안전하게 운행할 수 있는지 시설전반에 대하여 꼼꼼하게 점검 하였다.

○ 정밀점검 결과 시운전열차의 운행에 지장을 주는 문제점이 발견되지 않아 7월말부터는 KTX열차를 시속 250km/h로 운행하면서 전차선과 팬터그래프간 접촉력, 전력품질, 자동열차제어시스템, 철도시스템과 KTX차량간 연계성, 열차관제시스템 등 총 99종의 시설물검증시험을 10월 중순까지 실시한다.

○ 또한, 10월 말부터는 인천공항～강릉까지 실제 영업상황을 가정한 영업시운전열차를 약 1달간 운행하여 열차운행체계의 적정성, 열차관제능력과 고객의 열차이용 편리성 등을 점검하면서 KTX기장의 노선숙지 훈련도 병행하여 보다 안전하고 완벽한 개통을 철저하게 준비할 예정이다.

□ 철도공단 김상태 기술본부장은 “원주∼강릉 철도를 개통하는 날까지 안전을 위하여 사소한 사항이라도 빈틈없이 점검할 것”이라며, “2018 평창동계올림픽을 찾는 선수단 및 관람객들에게 안전하고 편리한 한국철도의 우수성을 널리 알리겠다”고  말했다.