2024년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2024-14

담당부서

작성자

(시스템본부/전철처)

(이민구/042-607-3805/mingu972@kr.or.kr)

정 책 명

경부고속철도 시험선구간(천안아산~대전) 전철전원설비 개량사업

사업개요

및

추진경과

ㅇ 과업범위

ㅇ 사업개요

- 사업목적 : 대부분 설비가 내용연수 경과로 노후화가 심화되고 있는 경부고속철도 시험선구간(천안아산～대전)의 정밀 안전진단 시행결과를 반영하여 운행중인 고속철도 열차에 안정적인 전원확보를 위해 동 구간에 대한 개량을 시행하기 위함.

- 사업구간 : 석곡병렬급전소(85km521)~회덕급전구분소(151km 405) 약 70km

- 사업기간 : 2019 ∼ 2024년

- 사업규모 : 2,086억원

ㅇ 주요내용

- 송  전 : 송전선로 1개소, 154kV 2회선(긍장 0.17km)

- 변  전 : 신청주 전철변전소외 7개소

- 전  력 : 배전선로 22.9kV 2회선(긍장 66km) 및 배전설비 1식

※ 배전설비 : 배전소 27개소, 수전실 3개소, 건축전기(소방전기 포함) 10개소

- 통  신 : 건축통신, 영상감시 등 통신설비 1식

- 건  축 : 운전보안시설 20동

※ 건축설비 : 변전소 1개소, 수전실 3개소, 배전소 16개소

ㅇ 추진경과

- ‘18.02.~’18.08. 시험선구간 변전 및 배전설비 정밀안전점검 시행

- ‘19.02.~`20.12. 실시설계 시행

- `21.06. 변전, 건축분야 착공

- `21.07. 전력, 통신분야 착공

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
시스템본부	구욱현	본부장 (직무대행)	‘23.07.∼현재	업무총괄
	오재훈	처장	‘23.07.∼현재	사업총괄
	이춘경	부장	‘23.07.∼현재	계획 및 관리
충청본부	김윤양	본부장	‘23.07.∼현재	충청본부 소관사업 총괄
	백효순	단장	‘24.01.∼현재	시설관리단 소관사업 총괄
	김충섭	부장	‘22.01.∼현재	시스템개량사업 총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 국토부 철도국 : 철도시설안전과장 김유인, 사무관 이경록

ㅇ 계약상대자

<변전분야>

구 분	경부고속철도 신청주전철변전소외 10개소
설계사	㈜한국이알이시, ㈜건창이앤텍, 이알티엔지니어링(주) ㈜종합건축사사무소근정
시공사	㈜지앤에스이엔지, ㈜존전기
감리사	㈜한국이알이시, ㈜한국코아엔지니어링

<전력분야>

구 분	석곡~용정	용정~덕용	덕용~궁현남	궁현남~회덕
설계사	㈜디투엔지니어링
시공사	코오롱글로벌(주) 천우전기(주)	종합전기(주) ㈜우송전기	㈜성전사 ㈜대흥디씨티 ㈜대산전기공사	합자회사 자유이엔씨 우창전력(주)
감리사	㈜백립종합건축사사무소 ㈜디투엔지니어링		㈜디투엔지니어링 ㈜프로텍타코리아 ㈜백림종합건축사사무소

<통신분야>

구 분	경부고속철도 석곡PP~회덕SP
설계사	㈜한국이알이시, ㈜건창이앤텍, 이알티엔지니어링(주) ㈜종합건축사사무소근정
시공사	인포스텔(주), ㈜길호, 광명전력(주)
감리사	대한엔지니어링(주)

<건축분야>

구 분	경부고속철도 신청주전철변전소 외 2동
설계사	㈜한국이알이시, ㈜건창이앤텍, 이알티엔지니어링(주) ㈜종합건축사사무소근정
시공사	㈜대흥종합건설
감리사	㈜종합건축사사무소근정, ㈜융도엔지니어링

추진실적

ㅇ ‘20.12. 경부고속 시험선구간 변전/배전설비 개량 실시설계 준공

ㅇ ‘21.01. 경부고속 시험선구간 전철전원설비 개량사업 사업실시계획 승인 요청

ㅇ `21.06. 변전, 건축분야 착공

ㅇ ‘21.07. 경부고속 시험선구간 전철전원설비 개량사업 사업실시계획 승인

ㅇ `21.07. 전력, 통신분야 착공

ㅇ `22.10. 기존 변전부지 지장물 이설

ㅇ `23.01. 대체 22kV 케이블 포설

ㅇ `23.07. 신설 회덕급전구분소 개통

ㅇ ’23.12. 전력 대체 케이블 및 배전반 절체 완료