KRQP C-08100

Rev.10, 15. July 2024

받침 및 받침부

2024. 7.

REVIEW CHART

개정 번호	개정 일자	개정사유 및 내용(근거번호)	작성자	검토자	승인자
0	2014.12.31	신규제정	류완상	김대원 백효순	이동렬
1	2016.04.30	2016년 상반기 건설공사표준품셈 변경분 반영	백진호	손병두 백효순	김영하
2	2017.05.29	2017년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	이만수 백효순	김영하
3	2017.09.12	2017년 하반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	이만수 백효순	김영하
4	2018.03.19	2018년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	조순형 백효순	김영하
5	2019.04.02	2019년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	민병균 박진용	손병두
6	2019.12.24	2019년 하반기 신규공종단가 및 관련부서 개정 요구사항 반영	한익표	박창완 박진용	이종윤
7	2021.05.18	2021년 상반기 건설공사 표준품셈 등 변경분 반영	한익표	이창현 심형환	최원일
8	2021.12.29	공단 명칭, CI 변경분 반영	한익표	이창현 심형환	유성기
9	2023.03.31	2023년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	한익표	안기성 이창현	김종호
10	2024.07.15	2024년 상반기 건설공사표준품셈 변경분, 감사처분 반영	임승빈	백효순 지연희	손병두

KRQP C-08100

목   차

Ⅰ. 수량조서(예시)	1

Ⅱ. 수량산출(예시)	2

1. 교량공	2

2. 입체교차	2

3. 내진보강 전단키제작설치	3

Ⅲ. 단가산출(예시)	4

RECORD HISTORY	9

Ⅰ. 수량조서(예시)

-  -

KRQP C-08100

-  -

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
1	교량공
1.01	교량받침
a	무수축콘크리트	fck=30Mpa	㎥	1
b	무수축모르타르	fck=60Mpa	㎥	1
c	교량받침콘크리트	소형,무근,인력운반타설	㎥	1
d	합판거푸집	3회,H=0～7m	㎡	1
e	교량받침설치	포트받침	개	1
f	교량받침설치	탄성받침	개	1
2	입체교차
2.01	교량받침
a	무수축콘크리트	fck=30Mpa	㎥	1
b	무수축모르타르	fck=60Mpa	㎥	1
c	교량받침콘크리트	소형,무근,인력운반타설	㎥	1
d	합판거푸집	3회,H=0～7m	㎡	1
e	교량받침설치	포트받침	개	1
f	교량받침설치	탄성받침	개	1
3	내진보강 전단키제작설치
3.01	내진보강 전단키제작		Ton	1
3.02	내진보강 전단키설치		개소	1

Ⅱ. 수량산출(예시)

1. 교량공

가. 교량받침

1) 무수축콘크리트 - fck = 30Mpa(㎥)

교량받침면 무수축콘크리트 타설에 적용하며, 체적으로 수량을 산출한다.

소량의 콘크리트 구조물(인력비빔 3㎥내외, 기계비빔 10㎥내외)이 산재되어 있는 경우에 적용한다.

2) 무수축모르타르 - fck = 60Mpa(㎥)

교좌면 무수축모르타르 타설에 적용하며, 체적으로 수량을 산출한다.

3) 교량받침콘크리트 - 소형,인력운반타설(㎥)

체적으로 수량을 산출한다.

개소별 소량(12㎥ 이하)의 타설 위치가 산재되어 있는 경우에 적용한다.

4) 합판거푸집 - 3회, H=0～7m(㎡)

콘크리트 타설면의 면적으로 수량을 산출한다.

연직높이 0～7m를 기준으로 매 3m 증가마다 수량을 별도 산출한다.

구조물 형상에 따른 사용횟수와 유형은 아래 표를 고려하여 결정한다.

사용횟수	유형	구 조 물
1∼2회	제물치장	제물치장 콘크리트
2회	매우복잡	T형보, 난간, 복잡한 구조의 교각, 교대, 수문관의 본체 등 매우 복잡한 구조
3회	복잡	교대, 교각, 파라펫트, 날개벽 등 복잡한 벽체 구조 건축 라멘구조의 보, 기둥
4회	보통	측구, 수로, 우물통 등 비교적 간단한 벽체 구조, 교량 및 건축 슬래브
6회	간단	수문 또는 관의 기초, 호안 및 보호공의 기초 등 간단한 구조

5) 교량받침설치 - 포트받침(개)

교량받침배치도면을 참조하여 갯수로 수량을 산출한다.

6) 교량받침설치 - 탄성받침(개)

교량받침배치도면을 참조하여 갯수로 수량을 산출한다.

2. 입체교차

가. 교량받침

1) 무수축콘크리트 - fck = 30MPa(㎥)

가) ‘Ⅱ-1. 교량공’의 ‘가-1) 무수축콘크리트 - fck = 30MPa’ 참조

2) 무수축모르타르 - fck = 60MPa(㎥)

가) ‘Ⅱ-1. 교량공’의 ‘가-2) 무수축모르타르 - fck = 60MPa’ 참조

3) 교량받침콘크리트 - 소형,인력운반타설(㎥)

가) ‘Ⅱ-1. 교량공’의 ‘가-3) 교량받침콘크리트 - 소형,인력타설’ 참조

4) 합판거푸집 - 3회, H=0～7m(㎡)

가) ‘Ⅱ-1. 교량공’의 ‘가-4) 합판거푸집 - 3회, H=0～7m’ 참조

5) 교량받침설치 - 포트받침(개)

가) ‘Ⅱ-1. 교량공’의 ‘가-5) 교량받침설치 - 포트받침’ 참조

6) 교량받침설치 - 탄성받침(개)

가) ‘Ⅱ-1. 교량공’의 ‘가-6) 교량받침설치 - 탄성받침’ 참조

3. 내진보강 전단키제작설치

가. 내진보강 전단키제작(Ton)

내진보강공사의 전단키 제작에 적용하며, 중량으로 수량을 산출한다.

나. 내진보강 전단키설치(개소)

내진보강공사의 전단키 설치에 적용하며, 개소로 수량을 산출한다.

Ⅲ. 단가산출(예시)

- 단가적용시 현장여건에 따라 작업효율, 적용장비, 운반거리 등을 고려하여야 하며, 건설공사 표준 품셈의 개정, 공단기준의 변경 등을 반영한 최신의 품을 적용하여야 한다.

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
1	교량공
1.01	교량받침
a	무수축콘크리트 (fck = 30Mpa)	㎥	1. 배 합 비 1) 혼 화 제:1.258㎏ 2) 모 래: 860㎏ 3) 시 멘 트: 423㎏ 4) 자갈(D15㎜):969㎏ 5) 물 시멘트 비:45.7% 2. 재 료 비 1) 시멘트운반및구입:423㎏×1.03(할증) = 435.690㎏ 2) 모래운반및구입:860㎏/1600㎏/㎥ = 0.538㎥ 3) 자갈운반및구입:969㎏/1700㎏/㎥ = 0.570㎥ 4) 혼 화 제:1.258㎏×1.02(할증) = 1.283㎏ 3. 배합 및 치기 1) 보 통 인 부:1.36인 2) 콘크리트 공:1.29인 4. 양생비(무근) 1) 보통인부:0.22인/10㎥=0.022인 2) 제잡비(양생손료,기구손료):인력품의 31%	[공통]6-1-2 현장비빔타설 (인력비빔타설) 2016년건설표준품셈 6-1-2-2 양생비
b	무수축모르타르 (fck = 60Mpa)	㎥	1. 배 합 비 1) 혼 화 제:15㎏ 2) 모 래:1000㎏ 3) 시 멘 트:1000㎏ 4) 물시멘트비:25～30% 2. 재 료 비 1) 시멘트운반및구입:1000㎏×1.03(할증) = 1030.000㎏ 2) 모래운반및구입:1000㎏/1600㎏/㎥ = 0.625㎥ 3) 무수축혼화제15㎏×1.02(할증) = 15.300㎏ 3. 배합 및 치기(타설은 교량받침 설치에 포함) 1) 배합(보통인부):0.66인(모래체가름 포함)	[건축)9-1-1 모르타르배합
c	교량받침콘크리트 타설(소형,무근,인력운반타설)	㎥	1. 타설인건비 ∴ 시공량 : Q = 23㎥/일×50% = 11.5㎥/일 1) 콘크리트공: 3인/일 / Q㎥/일 2) 보통인부: 3인/일 / Q㎥/일 3) 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의 기계경비 : 인력품의 2% 2. 양생비(무근) 1) 보통인부:0.22인/10㎥=0.022인 2) 제잡비(양생손료,기구손료):인력품의 31%	[공통]6-1-1 레디믹스트 콘크리트타설 2016년건설표준품셈 6-1-2-2 양생비
d	합판거푸집 (3회,H = 0～7m)	㎡	1. 재료비 1) 합판(12㎜):1.030㎡×44.3/100 2) 각재:0.038㎥×44.3/100 3) 소모자재(박리재 등):주자재비의 8%적용 2. 설치 및 해체(3회,복잡) ∴ Q(시공량) = 30㎡/일 1) 형틀목공: 5인/일 / Q㎡/일 2) 보통인부: 2인/일 / Q㎡/일 3) 공구손료 및 경장비 기계경비:인력품의 1% ※ 참조 - 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.	[공통]6-3-1 합판거푸집 설치및해체
e	교량받침설치 (포트받침)	개	1. 재료비 : 1개 2. 설치총수량 1) 고 정 단:100개 2) 가 동 단:100개 3) 합 계:100개+100개 = 200개 3. 설치총중량 1) 고정단:500㎏×100개 = 50000㎏ 2) 가동단:500㎏×100개 = 50000㎏ 3) 개당평균중량:(50000㎏+50000㎏)/200개=500㎏/개 - 교량받침 1기당 중량 0.5ton 이하 기준적용 4. 시공량 산정(1기당 중량 0.5ton이하, 설치높이 20m이하) ∴ Q(시공량) = 5개/일 5. 편성장비 1) 크레인(25∼50ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q개/일 2) 고소작업차(3∼5ton): 1대/일 × 8hr/일 / Q개/일 6. 편성인원(0∼20m미만) 1) 특별인부: 3인/일 × Q개/일 2) 보통인부: 1인/일 × Q개/일 3) 용 접 공: 1인/일 × Q개/일 4) 공구손료 및 경장비(치핑기, 용접기, 발전기, 핸드믹서기 등)기계경비(인력품의 3%)	[공통]6-6-1 교량받침 설치(육상)
f	교량받침설치 (탄성받침)	개	1. 재료비 : 1개 2. 설치총수량 1) 고 정 단:100개 2) 가 동 단:100개 3) 합 계:100개+100개 = 200개 3. 설치총중량 1) 고정단:500㎏×100개 = 50000㎏ 2) 가동단:500㎏×100개 = 50000㎏ 3) 개당평균중량:(50000㎏+50000㎏)/200개=500㎏/개 - 교량받침 1기당 중량 0.5ton 이하 기준적용 4. 시공량 산정(1기당 중량 0.5ton이하, 설치높이 20m이하) ∴ Q(시공량) = 5개/일 5. 편성장비 1) 크레인(25∼50ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q개/일 2) 고소작업차(3∼5ton): 1대/일 × 8hr/일 / Q개/일 6. 편성인원(0∼20m미만) 1) 특별인부: 3인/일 × Q개/일 2) 보통인부: 1인/일 × Q개/일 3) 용 접 공: 1인/일 × Q개/일 4) 공구손료 및 경장비(치핑기, 용접기, 발전기, 핸드믹서기 등)기계경비(인력품의 3%)	[공통]6-6-1 교량받침 설치(육상)
2	입체교차
2.01	교좌장치시설
a	무수축콘크리트 (fck = 30Mpa)	㎥	1. 배 합 비 1) 혼 화 제:1.258㎏ 2) 모 래: 860㎏ 3) 시 멘 트: 423㎏ 4) 자갈(D15㎜):969㎏ 5) 물 시멘트 비:45.7% 2. 재 료 비 1) 시멘트운반및구입:423㎏×1.03(할증) = 435.690㎏ 2) 모래운반및구입:860㎏/1600㎏/㎥ = 0.538㎥ 3) 자갈운반및구입:969㎏/1700㎏/㎥ = 0.570㎥ 4) 혼 화 제:1.258㎏×1.02(할증) = 1.283㎏ 3. 배합 및 치기 1) 보 통 인 부:1.36인 2) 콘크리트 공:1.29인 4. 양생비(무근) 1) 보통인부:0.22인/10㎥=0.022인 2) 제잡비(양생손료,기구손료):인력품의 31%	[공통]6-1-2 현장비빔타설 (인력비빔타설) 2016년건설표준품셈 6-1-2-2 양생비
b	무수축모르타르 (fck = 60Mpa)	㎥	1. 배 합 비 1) 혼 화 제:15㎏ 2) 모 래:1000㎏ 3) 시 멘 트:1000㎏ 4) 물시멘트비:25～30% 2. 재 료 비 1) 시멘트운반및구입:1000㎏×1.03(할증) = 1030.000㎏ 2) 모래운반및구입:1000㎏/1600㎏/㎥ = 0.625㎥ 3) 무수축혼화제15㎏×1.02(할증) = 15.300㎏ 3. 배합 및 치기(타설은 교량받침 설치에 포함) 1) 배합(보통인부):0.66인(모래체가름 포함)	[건축]9-1-1 모르타르배합
c	교량받침콘크리트 타설(소형,무근,인력운반타설)	㎥	1. 타설인건비 ∴ 시공량 : Q = 23㎥/일×50% = 11.5㎥/일 1) 콘크리트공: 3인/일 / Q㎥/일 2) 보통인부: 3인/일 / Q㎥/일 3) 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의 기계경비 : 인력품의 2% 2. 양생비(무근) 1) 보통인부:0.22인/10㎥=0.022인 2) 제잡비(양생손료,기구손료):인력품의 31%	[공통]6-1-1 레디믹스트 콘크리트타설 2016년건설표준품셈 6-1-2-2 양생비
d	합판거푸집 (3회,H = 0～7m)	㎡	1. 재료비 1) 합판(12㎜):1.030㎡×44.3/100 2) 각재:0.038㎥×44.3/100 3) 소모자재(박리재 등):주자재비의 8%적용 2. 설치 및 해체(3회,복잡) ∴ Q(시공량) = 30㎡/일 1) 형틀목공: 5인/일 / Q㎡/일 2) 보통인부: 2인/일 / Q㎡/일 3) 공구손료 및 경장비 기계경비:인력품의 1% ※ 참조 - 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.	[공통]6-3-1 합판거푸집 설치및해체
e	교량받침설치 (포트받침)	개	1. 재료비 : 1개 2. 설치총수량 1) 고 정 단:100개 2) 가 동 단:100개 3) 합 계:100개+100개 = 200개 3. 설치총중량 1) 고정단:500㎏×100개 = 50000㎏ 2) 가동단:500㎏×100개 = 50000㎏ 3) 개당평균중량:(50000㎏+50000㎏)/200개=500㎏/개 - 교량받침 1기당 중량 0.5ton 이하 기준적용 4. 시공량 산정(1기당 중량 0.5ton이하, 설치높이 20m이하) ∴ Q(시공량) = 5개/일 5. 편성장비 1) 크레인(25∼50ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q개/일 2) 고소작업차(3∼5ton): 1대/일 × 8hr/일 / Q개/일 6. 편성인원(0∼20m미만) 1) 특별인부: 3인/일 × Q개/일 2) 보통인부: 1인/일 × Q개/일 3) 용 접 공: 1인/일 × Q개/일 4) 공구손료 및 경장비(치핑기, 용접기, 발전기, 핸드믹서기 등)기계경비(인력품의 3%)	[공통]6-6-1 교량받침 설치(육상)
f	교량받침설치 (탄성받침)	개	1. 재료비 : 1개 2. 설치총수량 1) 고 정 단:100개 2) 가 동 단:100개 3) 합 계:100개+100개 = 200개 3. 설치총중량 1) 고정단:500㎏×100개 = 50000㎏ 2) 가동단:500㎏×100개 = 50000㎏ 3) 개당평균중량:(50000㎏+50000㎏)/200개=500㎏/개 - 교량받침 1기당 중량 0.5ton 이하 기준적용 4. 시공량 산정(1기당 중량 0.5ton이하, 설치높이 20m이하) ∴ Q(시공량) = 5개/일 5. 편성장비 1) 크레인(25∼50ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q개/일 2) 고소작업차(3∼5ton): 1대/일 × 8hr/일 / Q개/일 6. 편성인원(0∼20m미만) 1) 특별인부: 3인/일 × Q개/일 2) 보통인부: 1인/일 × Q개/일 3) 용 접 공: 1인/일 × Q개/일 4) 공구손료 및 경장비(치핑기, 용접기, 발전기, 핸드믹서기 등)기계경비(인력품의 3%)	[공통]6-6-1 교량받침 설치(육상)
3	내진보강 전단키제작설치
3.01	내진보강 전단키 제작	Ton	1. 작업조건 - 본 단가는 전용접부재 제작을 기준으로 한 품이며, H형강부재 제작의 경우 철골공품의 71%로 산정한다. 2. 철골공수 산정방법(공장생산) 1) 노무비 - 철골공:기본철골공수×작업난이도 - 공장제작경비(철골공의 60%, 경비로 산정) - 용접공:기본용접공수×보정계수 - 공장제작경비(용접공의 60%, 경비로 산정) - 산 소 : 7.0㎥/ton - L P G : 2.8kg/ton - 서비스볼트 : 2.0본/ton - 보조강재 : 6.0kg/ton - 용 접 봉 : 0.42kg/m×설계수량(m)	[건축] 1-1 철골가공조립 (공장생산)
3.02	내진보강 전단키설치	개소	1. 작업조건 1) 본 단가는 협소한 작업공간에서 작업 할 조건의 예시이며, 현장여건에 따라 표준품셈에서 제시된 품의 할증을 적용할수 있다. 2) 투입장비(크레인 등) 규격은 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다. 2 재료비 : 별도산정 ※ 협소한 작업공간에 자재 인양반입, 설치를 감안하여 할증 150% 적용 ※ 수상작업시 교량받침설치(수상)품 적용 3. 시공량 산정(1기당 중량 1.0ton이하, 설치높이 20m이하) ∴ Q(시공량) = 4개/일 4. 편성장비 1) 크레인(25∼50ton):1대/일×8hr/대/Q개/일×1.5<협소할증> 2) 고소작업차(3∼5ton):1대/일×8hr/일/Q개/일×1.5<협소할증> 5. 편성인원(0∼20m미만) 1) 특별인부: 3인/일×Q개/일×1.5<협소할증> 2) 보통인부: 1인/일×Q개/일×1.5<협소할증> 3) 용 접 공: 1인/일×Q개/일×1.5<협소할증> 4) 공구손료 및 경장비(치핑기, 용접기, 발전기, 핸드믹서기 등)기계경비(인력품의 3%)	[공통] 6-6-1 교량받침설치 (육상) 일부적용

RECORD HISTORY

Rev.0('14.12.31) 철도건설공사 수량 및 단가산출 표준의 구성체계를 KR CODE집에 맞추어 항목별 체계로 개정하여 사용자가 손쉽게 이용하는데 목적을 둠.

Rev.1('16.04.30) 2016년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.2('17.05.29) 2017년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.3('17.09.12) 2017년 하반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.4('18.03.19) 2018년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.5('19.04.02) 2019년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.6('19.12.24) 2019년 하반기 신규공종단가 및 관련부서 개정 요구사항 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.7('21.05.18) 2021년 상반기 표준품셈 개정, 감사처분, 현장VOC 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.8('21.12.29) 공단 명칭, CI변경 분 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.9('23.03.31) 2023년 상반기 건설공사 표준품셈 개정사항 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.10('24.07.15) 2024년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분, 감사처분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공