2023년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2023-05

담당부서

작성자

(건설본부/고속일반철도처)

(김동현/042-607-4725/kdh@kr.or.kr)

사 업 명

동해선 포항~삼척 철도건설사업

사업개요

및

추진경과

ㅇ 노선도

ㅇ 사업개요

- 사업내용 : 동해선 포항∼삼척간 166.3km 단선철도 건설

- 사업기간 : 2002년 ∼ 2023년

- 총사업비 : 3조 4,271억원 (국고 100%)

- 사업효과 : 환동해권 철도망으로 구축 국가기간철도망 확충, 동해안 관광통행 수요분담 및 지역개발 촉진

(선로용량 : 17회/일, 편도)

* 포항～삼척 1시간 50분 단축(버스 3시간 10분 → 열차 1시간 20분)

ㅇ 추진경과

- ˊ 96. 7.∼ˊ 97. 5. : 타당성 조사

- ˊ 00. 3.∼ 12.    : 기본계획수립 (철도청, B/C 1.054)

- ˊ 04.12.    : 노반 기본설계 완료

- ˊ 06.12.    : 노반 실시설계 완료

- ˊ08. 3.20.  : 사업실시계획(제1~3공구) 승인 및 노반1공구 착공

- ˊ09. 4.27.  : 사업실시계획 승인(제4공구~16공구)

- ˊ09. 5. 4.  : 1단계 구간(포항∼영덕) 노반 착공(2∼5공구)

- ˊ10. 1. ∼ ˊ11. 3.  : 기재부 간이타당성재조사 (KDI, B/C 0.31)

- ˊ14.11. ∼ ˊ15. 2.  : 2단계 구간(영덕∼삼척) 노반 착공 (6∼17공구)

- ˊ15. 3.31. : 노반 1공구 준공( ́15.4.2 포항역 KTX 영업 개시)

- ˊ18. 1.26 : 1단계 구간(포항~영덕) 개통(영업 개시)

* 포항~영덕 26분 단축(버스 60분 → 열차 34분), 운행횟수 : 14회/일

* 서울~영덕 1시간 16분 단축

(고속버스 4시간 20분 → 무궁화+고속열차(KTX) 환승 3시간 4분)

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
건설본부	손병두	본부장	`22.08.29∼현재	건설본부 사업 업무총괄
	한상연	처장	`23.01.18∼현재	고속일반철도 사업 업무총괄
	황병복	부장	`23.01.18∼현재	영남권 소관사업 업무총괄
영남본부	김공수	본부장	ˊ22.5.2.∼현재	영남본부 소관사업 업무총괄
	윤영호	단장	ˊ22.5.2.∼현재	영남권사업단 소관사업 업무총괄
	김태원	부장	ˊ23.1.18.∼현재	포항~삼척 철도건설 사업총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 국토교통부 : 철도건설과장 오송천, 담당사무관 김은철

ㅇ 설계사 : ㈜KRTC, ㈜신성ENG 등 7개사

ㅇ 시공사 : (주)대우건설, ㈜포스코건설, GS건설(주) 등 11개사

ㅇ 감리사 : ㈜수성ENG, ㈜대한콘설탄트, 유신 등 9개사

추진실적

ㅇ ‘18.01. : 1단계 구간(포항~영덕) 개통(영업 개시)