KRQP C-07010

Rev.15, 14. January 2026

지하구조물

2026. 1.

REVIEW CHART

개정 번호	개정 일자	개정사유 및 내용(근거번호)	작성자	검토자	승인자
0	2014.12.31	신규제정	류완상	김대원 백효순	이동렬
1	2016.04.30	2016년 상반기 건설공사표준품셈 변경분 반영	백진호	손병두 백효순	김영하
2	2016.12.31	2016년 하반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	백진호	손병두 백효순	김영하
3	2017.05.29	2017년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	이만수 백효순	김영하
4	2017.09.12	2017년 하반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	이만수 백효순	김영하
5	2018.03.19	2018년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	조순형 백효순	김영하
6	2018.11.19	2018년 하반기 신규공종단가 및 관련부서 개정 요구사항 반영	이진균	민병균 박진용	손병두
7	2019.04.02	2019년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	민병균 박진용	손병두
8	2019.12.24	2019년 하반기 신규공종단가 및 관련부서 개정 요구사항 반영	한익표	박창완 박진용	이종윤
9	2020.06.30	2020년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	한익표	박창완 이상현	이계승
10	2021.05.18	2021년 상반기 건설공사 표준품셈 등 변경분 반영	한익표	이창현 심형환	최원일
11	2021.12.29	공단 명칭, CI변경 분 반영	한익표	이창현 심형환	유성기
12	2022.06.03	2022년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	한익표	이창현 심형환	유성기
13	2023.03.31	2023년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	한익표	안기성 이창현	김종호
14	2024.07.15	2024년 상반기 건설공사표준품셈 변경분, 감사처분 반영	임승빈	백효순 지연희	손병두
15	2026.01.14	2025년 건설공사표준품셈 변경분, 감사처분 반영	임승빈	박진용 지연희	(代)우기하

KRQP C-07010

목   차

Ⅰ. 수량조서(예시)	1

Ⅰ-1. 개착식 BOX	1

Ⅰ-2. 지하차도	6

Ⅱ. 수량산출(예시)	9

Ⅱ-1. 개착식 BOX	9

1. 토공	9

2. 구조물공	15

3. 방수공	21

4. 보온공사비	22

Ⅱ-2. 지하차도	23

Ⅲ. 단가산출(예시)	27

Ⅲ-1. 개착식 BOX	27

Ⅲ-2. 지하차도	76

RECORD HISTORY	96

Ⅰ. 수량조서(예시)

KRQP C-07010

-  -

-  -

Ⅰ-1. 개착식 BOX

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
Ⅰ-1	개착식BOX
1	토 공
1.01	줄파기	H = 1.50m
a	줄파기	포장구간,측면파일	m	1
b	줄파기	포장구간,중앙파일	m	1
c	줄파기	비포장구간,측면파일	m	1
1.02	땅깎기
a	토사깎기
a-1	토사깎기	기계, 소규모	㎥	1
a-2	토사깎기	기계, 중규모	㎥	1
a-3	토사깎기	기계, 대규모	㎥	1
b	풍화암깎기	기계	㎥	1
c	연암깎기	기계	㎥	1
d	경암깎기	기계	㎥	1
1.03	굴착
a	굴착	비복공구간
a-1	굴착	토사,0～2m이하	㎥	1
a-2	굴착	토사,2m이하	㎥	1
a-3	굴착	풍화암,2m이하	㎥	1
a-4	굴착	연암,2m이하	㎥	1
a-5	굴착	경암,2m이하	㎥	1
b	굴착	복공구간
b-1	굴착	토사,0～2m이하	㎥	1
b-2	굴착	토사,2m이하	㎥	1
b-3	굴착	풍화암,2m이하	㎥	1
b-4	굴착	연암,2m이하	㎥	1
b-5	굴착	경암,2m이하	㎥	1
1.04	측구굴착
a	측구굴착	비복공구간
a-1	측구굴착	토 사	㎥	1

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
a-2	측구굴착	풍화암	㎥	1
a-3	측구굴착	연 암	㎥	1
a-4	측구굴착	경 암	㎥	1
b	측구굴착	복공구간
b-1	측구굴착	토 사	㎥	1
b-2	측구굴착	풍화암	㎥	1
b-3	측구굴착	연 암	㎥	1
b-4	측구굴착	경 암	㎥	1
1.05	바닥면고르기
a	바닥면고르기	풍화암	㎡	1
b	바닥면고르기	연 암	㎡	1
c	바닥면고르기	경 암	㎡	1
1.06	되메우기	개착부
a	가적치운반
a-1	가적치운반	토사,ℓ=300m	㎥	1
a-2	가적치운반	풍화암,ℓ=300m	㎥	1
b	되메움토내리기	슈 트	㎥	1
c	다짐공
c-1	상부노반다짐	토사	㎥	1
c-2	하부노반다짐	토사	㎥	1
c-3	하부노반다짐	풍화암	㎥	1
c-4	터널개착부다짐	토 사	㎥	1
1.07	사토처리
a	사토처리	토 사,ℓ=60m이상	㎥	1	D/T=15ton
b	사토처리	토 사,ℓ=60m이상	㎥		D/T=24ton
c	사토처리	풍화암,ℓ=60m이상	㎥	1	D/T=15ton
d	사토처리	풍화암,ℓ=60m이상	㎥		D/T=24ton
e	사토처리	연 암,ℓ=60m이상	㎥	1	D/T=15ton
f	사토처리	연 암,ℓ=60m이상	㎥		D/T=24ton
g	사토처리	경 암,ℓ=60m이상	㎥	1	D/T=15ton
h	사토처리	경 암,ℓ=60m이상	㎥		D/T=24ton

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
i	사토장고르기	토 사	㎥	1
j	사토장고르기	풍화암	㎥	1
k	사토장고르기	연 암	㎥	1
l	사토장고르기	경 암	㎥	1
1.08	유공관부설
a	유공관설치	HDPE,D250mm	m	1
b	부직포설치	300g/㎡	㎡	1
c	배수뒷잡석채움	소형장비	㎥	1
2	구조물공
2.01	라멘공	집수정,환기구 포함
a	콘크리트타설
a-1	바닥콘크리트타설	무근,펌프차	㎥	1
a-2	구체콘크리트타설	철근,펌프차	㎥	1
b	거푸집
b-1	합판거푸집	6회,H=0～7m	㎡	1
b-2	합판거푸집	4회,H=0～7m	㎡	1
b-3	합판거푸집	3회,H=0～7m	㎡	1
b-4	목재거푸집	3회,H=0～7m	㎡	1
b-5	원형거푸집	3회,H=0～7m	㎡	1
b-6	문양거푸집	판넬	㎡	1
b-7	유로폼	벽체,보통,H=0～7m	㎡	1
c	강관비계	3개월
c-1	강관비계	H=10m이하	㎡	1
c-2	강관비계	H=10m초과～20m이하	㎡	1
c-3	강관비계	H=20m초과～30m이하	㎡	1
d	시스템비계	3개월
d-1	시스템비계	H=10m이하	㎡	1
d-2	시스템비계	H=10m초과～20m이하	㎡	1
d-3	시스템비계	H=20m초과～30m이하	㎡	1

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
e	가설계단	3개월
e-1	경사형	H=6m이하	㎡	1
e-2	타워형		㎡	1
f	강관동바리	3개월
f-1	강관동바리	H=2.5m이하	공/㎥	1
f-2	강관동바리	H=2.5m초과～3.5m이하	공/㎥	1
f-3	강관동바리	H=3.5m초과～4.2m이하	공/㎥	1
g	시스템동바리	3개월
g-1	시스템동바리	H=10m이하	공/㎥	1
g-2	시스템동바리	H=10m초과～20m이하	공/㎥	1
g-3	시스템동바리	H=20m초과～30m이하	공/㎥	1
h	수평연결재	3개월	㎡	1
i	시공이음면정리		㎡	1
j	버팀목설치	D200×600mm	개소	1
k	매입전설치	2개 1조	조	1
l	인서트설치	D9mm	㎡	1
m	열차대피손잡이설치	스텐레스	개소	1
n	중앙말뚝방수		개소	1
o	스페이서설치
o-1	스페이서설치	벽체용	㎡	1
o-2	스페이서설치	슬래브및기초	㎡	1
p	철근현장가공조립
p-1	철근현장가공조립	Type-Ⅱ-1	ton	1
2.02	배수시설
a	배수로뚜껑제작설치	와이어메쉬,350×290×80mm	개	1
b	공동구뚜껑제작설치	와이어메쉬,480×350×80mm	개	1
c	배수공설치	PVC PIPE,D100mm	m	1
2.03	신축이음
a	신축이음채움	Hard Form	㎡	1
b	수팽창지수재설치	30×30mm	m	1
c	지수판설치	PVC,300×9T	m	1

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
3	방수공
3.01	보호모르타르설치
a	상부보호모르타르	1:3,T=50mm	㎡	1
b	벽체보호모르타르	1:3,T=5mm	㎡	1
c	하부보호모르타르	1:3,T=30mm	㎡	1
d	바닥고르기모르타르	1:3,T=10mm	㎡	1
3.02	방수시트설치
a	아스팔트방수시트
a-1	아스팔트방수시트	상하부,T=3mm	㎡	1
a-2	아스팔트방수시트	벽체,T=3mm	㎡	1
a-3	아스팔트방수시트	보강부,T=3mm	㎡	1
b	자착식방수시트
b-1	자착식방수시트	상하부	㎡	1
b-2	자착식방수시트	벽체	㎡	1
c	벤토나이트방수시트
c-1	벤토나이트방수시트	상하부,T=4.5mm	㎡	1
c-2	벤토나이트방수시트	벽체,T=4.5mm	㎡	1
4	보온공사비	열풍기	span	1

Ⅰ-2. 지하차도

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
Ⅰ-2	지하차도	익벽포함
1.01	콘크리트타설
a	바닥콘크리트	무근,펌프차	㎥	1
b	구체콘크리트	철근,펌프차	㎥	1
1.02	거푸집
a	합판거푸집	6회,H=0～7m	㎡	1
b	합판거푸집	4회,H=0～7m	㎡	1
c	합판거푸집	3회,H=0～7m	㎡	1
d	문양거푸집	판넬	㎡	1
e	유로폼	벽체,보통,H=0～7m	㎡	1
1.03	구조물비계
a	강관비계	3개월
a-1	강관비계	H=10m이하	㎡	1
a-2	강관비계	H=10m초과～20m이하	㎡	1
a-3	강관비계	H=20m초과～30m이하	㎡	1
b	시스템비계	3개월
b-1	시스템비계	H=10m이하	㎡	1
b-2	시스템비계	H=10m초과~20m이하	㎡	1
b-3	시스템비계	H=20m초과~30m이하	㎡	1
c	가설계단	3개월
c-1	경사형	H=6m이하	㎡	1
c-2	타워형		㎡	1
1.04	동바리
a	강관동바리	3개월
a-1	강관동바리	H=2.5m이하	공/㎥	1
a-2	강관동바리	H=2.5m초과~3.5m이하	공/㎥	1
a-3	강관동바리	H=3.5m초과~4.2m이하	공/㎥	1
b	시스템동바리	3개월
b-1	시스템동바리	H=10m이하	공/㎥	1
b-2	시스템동바리	H=10m초과~20m이하	공/㎥	1
b-3	시스템동바리	H=20m초과~30m이하	공/㎥	1

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
c	수평연결재	3개월, 강관	㎡	1
1.05	시공이음면정리		㎡	1
1.06	신축이음장치
a	신축이음	스티로폼,T=20mm	㎡	1
b	다웰바설치	D25×1000mm	개	1
c	충진재채움	20×20mm	m	1
d	지수판설치	300×9T	m	1
1.07	방수공
a	아스팔트방수
a-1	아스팔트방수	벽체,2회	㎡	1
a-2	아스팔트방수	바닥,2회	㎡	1
b	시트방수
b-1	시트방수	상․하부,T=3mm	㎡	1
b-2	시트방수	벽 체,T=3mm	㎡	1
b-3	시트방수	보강부,T=3mm	㎡	1
c	모르타르
c-1	바닥고르기모르타르	1:3,T=10mm	㎡	1
c-2	상부보호모르타르	1:3,T=50mm	㎡	1
c-3	바닥보호모르타르	1:3,T=30mm	㎡	1
c-4	벽체보호모르타르	1:3,T=5mm	㎡	1
d	시멘트벽돌쌓기	벽체,0.5B	㎡	1
1.08	배수시설
a	배수뒷잡석채움	소형장비	㎥	1
b	드레인보드설치	T = 20mm	㎡	1
c	부직포설치	300g/㎡	㎡	1
d	배수공설치	PVC PIPE,D75mm	m	1
e	스틸그레이팅설치	각 종	개	1
f	공동구콘크리트타설	기계타설	m	1
1.09	스페이서설치
a	스페이서설치	벽체용	㎡	1
b	스페이서설치	슬래브 및 기초	㎡	1
1.10	커플러설치	각 종	개	1

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
1.11	철근현장가공조립
a	철근현장가공조립	Type-Ⅱ-1	ton	1
1.12	타일붙이기
a	자기질타일붙이기	벽체,110×190×15mm	㎡	1	떠붙이기
b	자기질타일붙이기	벽체,90×190×15mm	㎡	1	압착붙이기
1.13	지하차도조명		식	1
1.14	펌프설비공사	펌프포함	식	1
1.15	파이프루프공법
a	강관추진	토사,D600mm	m	1
b	강관제작설치	D600mm,ℓ=16m	m	1
c	기계이동설치
c-1	기계이동설치	수직	회	1
c-2	기계이동설치	수평	회	1
d	강관내그라우팅	1:3	㎥	1
1.16	프론트재킹공법
a	수평천공	D150mm, 점성토	m	1
b	PC강선 설치철거	8t-15.2mm	m	1
c	정착구 설치철거		조	1
d	잭설치철거
d-1	잭설치철거	프론트잭	대	1
d-2	잭설치철거	페이스잭	대	1
e	선단슈관입	구조물단면적,80～100㎡	개소	1
f	BOX굴착 및 견인	구조물단면적,60～80㎡	m	1
1.17	지하차도 부대공
a	난간설치	H = 1.0m	m	1
b	통과높이표지판설치	D600mm	개	1

Ⅱ. 수량산출(예시)

Ⅱ-1. 개착식 BOX

1. 토공

가. 줄파기 - H = 1.50m

도로 밑에는 상․하수도관, 도시가스관, 한전 및 통신케이블 등 많은 지장물들이 매설되어 있으므로 지장물 유무를 확인할 수 있는 줄파기 작업을 시행한다.

1) 줄파기 - 포장구간, 측면파일(m)

가) 최소깊이 1.5m, 폭 1.0m로 종방향 인력 굴착한다.

나) 아스콘포장의 절단 및 깨기량은 별도로 산출한다.

2) 줄파기 - 포장구간, 중앙파일(m)

가) 최소깊이 1.5m, 폭 1.0m로 종방향 인력 굴착한다.

나) 아스콘포장의 절단 및 깨기량은 별도로 산출한다.

3) 줄파기 - 비포장구간, 측면파일(m)

가) 최소깊이 1.5m, 폭 1.0m로 종방향 인력 굴착한다.

<그림 1> 줄파기 단면(예시)

나. 땅깎기

깎기부 비탈면경사는 토질별 비탈면안정 검토결과에 따라 적용하며, 소규모 현장일 경우는 적용기준을 고려하여 설계에 반영한다.

1) 토사깎기-기계(㎥)

가) 횡단면도상에서 작성된 토공표를 이용, 토공입적표를 작성하여 산출한다.

나) 모든 깎기 수량은 자연상태의 수량으로 한다.

다) 깎기 기울기는 토사층 최초 수직고가 5m까지는 1:1.0∼1.2, 그 이상은 1:1.2∼1.5로 하는 것을 표준으로 하되, 비탈면안정검토 결과에 따라 조정․적용한다.

라) 소단은 5m 높이마다 폭 1.5m로 설치하며 소단기울기는 5%로 한다.

마) 공사규모의 구분은 다음에 준하여 적용한다.

대규모	중규모	소규모
공사수량이 100,000m3 이상인 경우	공사수량이 100,000m3 미만인 경우	공사수량 10,000m3 미만인 경우 또는 작업공간이 협소 등 장비운영이 원활하지 않은 경우
※ 공사수량이란 시설물(교량, 터널 등) 및 지형조건(하천, 도로, 철도 등)에 의해 단절되는 토공 작업구간의 시공량을 말하며, 공사기간 및 현장여건을 감안하여 공사규모를 판단한다.

바) 토사는 보통토사와 혼합토사로 구분하며, 혼합토사는 다음을 준하여 적용할 수 있다.

(1) 토질이 견고하여 리퍼, 브레이커 등이 병행 작업되는 경우

(2) 호박돌, 자갈 등이 혼합되어 버킷을 가득 채우기 어려운 경우

2) 풍화암깎기 - 기계(㎥)

가) 횡단면도상에서 작성된 토공표를 이용, 토공입적표를 작성하여 산출한다.

나) 모든 깎기 수량은 자연상태의 수량으로 한다.

다) 깎기 기울기는 1:1.2를 표준으로 하되, 사면안정검토 후 현지여건에 따라 조정할 수 있다.

라) 풍화암구간에서는 5m마다 폭 1.5m의 소단을 설치한다.

마) 소단과 소단 사이에 토사와 풍화암 구분선이 발생시 많은 쪽 비탈면 기울기를 적용토록 한다.

3) 연․경암깎기 - 기계(㎥)

가) 횡단면도상에서 작성된 토공표를 이용, 토공입적표를 작성하여 산출한다.

나) 모든 깎기 수량은 자연상태의 수량으로 한다.

다) 표준기울기는 연암부에서 기울기가 절리방향이면 1:1.2, 절리직각방향이면 1:0.5∼0.7, 경암부에서는 기울기가 절리방향이면 1:0.8, 절리직각방향이면 1:0.3∼0.5로 하되, 불연속면의 상태에 따라 비탈면 안정검토를 반드시 실시하고 그 결과에 따라 기울기를 조정한다.

라) 발파공법 적용은 설계발파진동 추정식을 이용하여 「거리∼지발당 장약량 조견표」를 참고하여 보안물건에 대한 발파진동 허용기준 및 이격거리에 맞는 지발당 장약량을 구하고 적합한 발파공법을 선정한다.

마) 발파규모(굴착규모)는 「발파소음·진동·비석영향권」 분석에 의해 산정한다.

<표 1> 진동속도에 의한 발파규모의 산정

구 분	발 파 공 법	설계지발당 장약량(㎏)
TYPE-Ⅰ	미진동굴착공법	폭약기준 0.125미만
TYPE-Ⅱ	정밀진동제어발파	0.25
TYPE-Ⅲ	소규모진동제어발파	1.0
TYPE-Ⅳ	중규모진동제어발파	3.0
TYPE-Ⅴ	일 반 발 파	7.5
TYPE-Ⅵ	대규모 발파	20.0

설계지발당 최대장약량은 다음 발파진동추정식에 의하여 산출한다.

[eqn: V`=`200( {D} over {W} ) ^{-1.6}]	여기서,	V : 진동속도(㎝/sec) D : 폭원에서의 이격거리(m) W : 지발당 최대장약량(㎏)

바) 육상 암석절취의 각 공법별 구분은 국토교통부 “도로공사노천발파설계·시공지침”에 따른다

사) 암석절취는 천공, 장약 및 전색재 채움, 발파선 설치, 발파작업이 포함되어 있으며, 적용범위는 다음과 같다.

아) 미진동굴착공법과 정밀진동제어발파는 대형브레이커에 의한 2차 파쇄가 포함되어 있으며, 소규모진동제어발파, 중규모진동제어발파, 일반발파, 대규모발파는 발파 후 굴착기로 발파암을 허물어뜨리는 작업이 포함되어 있다. 단, 발파암 집토(필요시), 상차, 반출 및 운반은 별도 적용한다.

자) 암석절취는 소형브레이커에 의한 천공 후 폭약을 장약하여 발파하는 공법으로 절취폭이 4m 미만인 경우 등 작업장소가 협소하거나 현장여건상 크롤러드릴 사용이 곤란한 경우에 적용한다.

차) 소규모, 중규모 진동제어발파, 일반발파, 대규모발파(미진동굴착 및 정밀진동제어 제외)로 발생된 발파암 수량 중 유용하는 양에 한하여 유용량의 15%를 소할하는 것으로 하부노반 다짐비에 반영한다.

카) 시공면의 면고르기 및 표토제거 등이 필요한 경우 별도 공종으로 수량을 산출한다.

<그림 2> 횡단면도상 발파공법 선정 방법(예시)

다. 굴착

1) 굴착 - 비복공구간(H-300×300mm일 경우)

<그림 3> 굴착 단면(예시)

가) 굴착 - 토사, 0～2m이하(㎥)

굴착량은 (B'×2m×ℓ)로 산출하며 자연상태의 체적이다.

나) 굴착 - 토사, 2m이하(㎥)

굴착량은 {B'×(H1 - 2m)×ℓ}로 산출하며 자연상태의 체적이다.

다) 굴착 - 풍화암, 2m이하(㎥)

굴착량은 {B'×(H2 - H1)×ℓ}로 산출하며 자연상태의 체적이다.

라) 굴착 - 연암, 2m이하(㎥)

굴착량은 {B'×(H3 - H2)×ℓ}로 산출하며 자연상태의 체적이다.

마) 굴착 - 경암, 2m이하(㎥)

굴착량은 {B'×(H4 - H3)×ℓ}로 산출하며 자연상태의 체적이다.

2) 굴착 - 복공구간

가) 굴착 - 토사, 0～2m이하(㎥)

나) 굴착 - 토사, 2m이하(㎥)

다) 굴착 - 풍화암, 2m이하(㎥)

라) 굴착 - 연암, 2m이하(㎥)

마) 굴착 - 경암, 2m이하(㎥)

수량의 산출은 ‘1) 굴착 - 비복공구간’과 공통 적용한다.

라. 측구굴착

구조물 본체를 따라 좌우양측에 폭 0.5m, 깊이 0.5m로 굴착하고 본체 30m마다 횡단 1개소를 계상한다.

1) 측구굴착 - 비복공구간

가) 측구굴착 - 토사(㎥)

나) 측구굴착 - 풍화암(㎥)

다) 측구굴착 - 연암(㎥)

라) 측구굴착 - 경암(㎥)

굴착량은 {(0.5×0.5×2)+(B+0.3)×0.5×0.5÷30m}로 산출하며 자연상태의 체적이다.

2) 측구굴착 - 복공구간

가) 측구굴착 - 토사(㎥)

나) 측구굴착 - 풍화암(㎥)

다) 측구굴착 - 연암(㎥)

라) 측구굴착 - 경암(㎥)

굴착량은 {(0.5×0.5×2)+(B+0.3)×0.5×0.5÷30m}로 산출하며 자연상태의 체적이다.

마. 바닥면고르기

1) 바닥면고르기 - 풍화암(㎡)

가) 굴착부 풍화암 구간 비탈면과 소단을 포함한 비탈면 거리로 면적을 산출한다.

나) 비탈면 고르기 품만 계상한다.

2) 바닥면고르기 - 연암(㎡)

가) 굴착부 연암 구간 비탈면과 소단을 포함한 비탈면 거리로 면적을 산출한다.

나) 비탈면 고르기 품만 계상한다.

다) 브레이커 시공시는 면고르기 품을 제외한다.

3) 바닥면고르기 - 경암(㎡)

가) 굴착부 경암 구간 비탈면과 소단을 포함한 비탈면 거리로 면적을 산출한다.

나) 비탈면 고르기 품만 계상한다.

다) 브레이커 시공시는 면고르기 품을 제외한다.

바. 되메우기 - 개착부

1) 가적치운반

가) 가적치운반 - 토사, ℓ=300m(㎥)

(1) 터파기한 흙을 현장 인근의 가적치장까지 운반하는 수량이다. 단, 운반거리 ℓ=300m는 예시된 거리이므로 현장여건에 따라 변경하여 적용하여야 한다.

(2) 가적치량은 자연상태의 수량으로 되메우기량÷토량환산계수(L)로 산출한다.

나) 가적치운반 - 풍화암, ℓ=300m(㎥)

(1) 터파기한 흙을 현장 인근의 가적치장까지 운반하는 수량이다. 단, 운반거리 ℓ=300m는 예시된 거리이므로 현장여건에 따라 변경하여 적용하여야 한다.

(2) 가적치량은 자연상태의 수량으로 되메우기량÷토량환산계수(L)로 산출한다.

2) 되메움토 내리기 - 슈트(㎥)

가) 되메움재료를 슈트를 제작 사용하여 되메우기 위치까지 내리는 수량이다.

나) 수량은 측벽부와 구조물 상단 1m까지의 되메움량을 다짐상태의 체적으로 산출한다.

3) 다짐공

가) 상부노반다짐 - 토사(㎥)

(1) 쌓기 중 시공기면에서 일반철도 1.5m, 고속철도 3.0m 깊이 범위 내에 있는 부분을 쌓는 작업을 말한다.

(2) 상부노반의 재료는 토사를 사용함을 원칙으로 하되 부득이한 경우 양질의 풍화암 및 연․경암을 사용할 수 있다. 단, 시공기면으로부터 밑으로 0.6m부분은 암버력으로 하여서는 안 된다.

(3) 쌓기물량은 다짐상태의 수량으로 산출한다.

나) 하부노반다짐 - 토사(㎥)

(1) 원지반으로부터 상부노반 쌓기의 아래에 있는 부분을 쌓는 작업을 말한다.

(2) 쌓기물량은 다짐상태의 수량으로 산출한다.

다) 하부노반다짐 - 풍화암(㎥)

(1) 쌓기물량은 다짐상태의 수량으로 산출한다.

라) 터널개착부다짐 - 토사(㎥)

(1) 측벽부와 구조물 상단 1m까지는 구조물의 손상을 고려하여  소형로울러 및 인력다짐을 병용하여 적용할 수 있다.

(2) 수량은 측벽부와 구조물 상단 1m까지의 되메움량을 다짐상태의 체적으로 산출한다.

사. 사토처리

1) 사토처리 - 토사, ℓ=60m이상(㎥)

가) 설계서 수량은 자연상태(모암상태) 수량으로 토공분배표에서 산출한다.

나) 기초말뚝 작업시 발생하는 굴착토에 대하여는 별도의 규정이 없으나, 작업시 첨가되는 불순물 등에 의해 오염될 가능성이 있으므로 현장시험 결과에 따라 사토 또는 폐기물처리를 결정한다.

다) 사토장은 사토량을 충분히 처리할 수 있는 면적을 산출한다.

라) 사토장의 위치는 가능지역을 선정하여 토지이용계획 확인원 및 토지소유자의 동의서를 보고서에 첨부시키고, 추후 정산이 가능토록 한다.

마) 도로 및 현장여건에 따라 로더 3.5㎥ 및 5.0㎥, 덤프15톤 및 24톤 적용

2) 사토처리 - 풍화암, ℓ=60m이상(㎥)

‘1) 사토처리 - 토사, ℓ=60m이상(㎥)’와 공통 적용한다.

3) 사토처리 - 연암, ℓ=60m이상(㎥)

‘1) 사토처리 - 토사, ℓ=60m이상(㎥)’와 공통 적용한다.

4) 사토처리 - 경암, ℓ=60m이상(㎥)

‘1) 사토처리 - 토사, ℓ=60m이상(㎥)’와 공통 적용한다.

5) 사토장 고르기 - 토사(㎥)

가) 사토장 정리비 및 비탈면 보호공이 필요한 경우 별도의 공종으로 수량을 산출한다.

나) 사토장이 공유수면 매립지 또는 토석정보 시스템에 의한 타 공사현장 등 고르기가 흙을 공급받는 자 부담일 경우 적용하지 않는다.

6) 사토장 고르기 - 풍화암(㎥)

‘5) 사토장 고르기 - 토사(㎥)’와 공통 적용한다.

7) 사토장 고르기 - 연암(㎥)

‘5) 사토장 고르기 - 토사(㎥)’와 공통 적용한다.

8) 사토장 고르기 - 경암,(㎥)

‘5) 사토장 고르기 - 토사(㎥)’와 공통 적용한다.

아. 유공관부설

1) 유공관설치 -  HDPE, D250mm(m)

배수관의 설치 연장으로 수량을 산출한다.

2) 부직포설치 - 300g/㎡(㎡)

가) 배수뒷잡석이나 유공관을 부직포로 감싸는 수량이다.

나) 배수뒷잡석이나 드레인보드의 겉면적으로 수량을 산출한다.

다) 드레인보드에 부직포를 설치시는 부직포를 100mm 겹치게 한다.

3) 배수잡석채움(㎥)

가) 수로콘크리트나 옹벽공의 배수공 등 인력채움이 필요한 잡석채움에 적용한다.

나) 수량은 체적으로 산출한다.

2. 구조물공

가. 일반사항

1) 바닥콘크리트

가) 콘크리트 타설 전에 정확히 측량을 해서 바닥면고를 결정해야 한다.

나) 바닥콘크리트의 두께는 100mm를 기준으로 하고 지질이 연약한 경우에는 별도의 조치를 강구해야 한다.

다) 타설면을 평탄하게 유지하여 방수시공을 용이하게 한다.

라) 용수지역은 배수계획을 수립하여 용수의 용출이 없도록 하여야 한다.

2) 구체의 시공순서

<그림 4> 개착식BOX 단면(예시)

가) 바닥슬래브 철근조립, 콘크리트 타설

나) 바닥 헌치 거푸집 조립, 콘크리트 타설

다) 1단 벽체철근, 거푸집 조립, 콘크리트 타설

라) 중앙기둥 철근, 거푸집 조립, 콘크리트 타설

마) 상부슬래브 철근, 거푸집 조립, 콘크리트 타설

바) 현장여건에 따라 가)와 나)를 동시에 타설할 수 있다.

3) 철근조립

가) 철근은 배근도에 의거 정확히 조립하고 철근피복이나 간격을 확보할 수 있도록 스페이서를 설치한다.

나) 조립이 완료된 철근 위로 걸어다닐 경우에는 보행용 통로판을 설치하여 철근의 간격이나 피복이 흐트러지는 것을 방지한다.

다) 철근교차 지점은 빠짐없이 결속을 시행하여 작업중 철근의 이탈이 없도록 해야 한다.

4) 거푸집 및 동바리

가) 거푸집은 합판거푸집과 유로폼, 강재거푸집을 여건에 따라 선택 사용한다.

나) 상부슬래브 저면은 처짐에 대비하여 조립한다.

다) 거푸집은 콘크리트면이 균일하도록 충분한 지지력을 가져야 한다.

5) 콘크리트 타설

가) 콘크리트 타설시간은 일반적으로 교통제약이 적은 시간을 택한다.

나) 콘크리트 타설장소 부근에는 조명시설을 충분히 할 필요가 있다.

나. 라멘공

1) 콘크리트 타설

가) 바닥콘크리트 타설 - 무근, 펌프차사용(㎥)

(1) 토목공사 기초구조물 공사시 바닥(버림) 콘크리트 타설 등에 적용한다.

(2) 시설유형 적용기준에 따라 구분하여 적용한다.

나) 구체콘크리트 타설 - 철근, 펌프차 사용(㎥)

(1) 콘크리트 펌프차를 이용한 타설 기준으로 붐타설이 적용가능한 구간에 적용한다.

(2) 체적으로 수량을 산출한다.

(3) 시설유형 적용기준에 따라 구분하여 적용한다.

구 분	시설유형 적용기준
TYPE-Ⅰ	매트기초 등 펌프차 작업에 제약이 없는 시설물
TYPE-Ⅱ	벽, 기둥, 보, 슬라브, 교대, 교각 등 펌프차 작업에 큰 지장이 없어 일반적인 시공이 가능한 시설물
TYPE-Ⅲ	옹벽, 줄기초, 슬래브 없는[월거더]구조의 기둥과 보 등 펌프차 작업에 제약을 받는 타설부위가 좁거나 깊은 시설물
TYPE-Ⅳ	절/성토부 비탈면에 시공되는 구조물 등 펌프차 작업에 제약이 매우 큰 시설물

2) 거푸집

가) 합판거푸집 - 6회, H=0～7m이하(㎡)

(1) 콘크리트 타설면의 면적으로 수량을 산출한다.

(2) 연직높이 0～7m를 기준으로 매 3m 증가마다 수량을 별도 산출한다.

(3) 구조물 형상에 따른 사용횟수와 유형은 아래 표를 고려하여 결정한다.

사용횟수	유형	구조물
1∼2회	제물치장	제물치장 콘크리트
2회	매우복잡	T형보, 난간, 복잡한 구조의 교각, 교대, 수문관의 본체 등 매우 복잡한 구조
3회	복잡	교대, 교각, 파라펫트, 날개벽 등 복잡한 벽체 구조 건축 라멘구조의 보, 기둥
4회	보통	측구, 수로, 우물통 등 비교적 간단한 벽체 구조, 교량 및 건축 슬래브
6회	간단	수문 또는 관의 기초, 호안 및 보호공의 기초 등 간단한 구조

나) 합판거푸집 - 4회, H=0～7m이하(㎡)

‘가. 합판거푸집’과 공통 적용한다.

다) 합판거푸집 - 3회, H=0～7m이하(㎡)

‘가. 합판거푸집’과 공통 적용한다.

라) 목재거푸집 - 3회, H=0～7m이하(㎡)

‘가. 합판거푸집’과 공통 적용한다.

마) 원형거푸집 - 3회, H=0～7m이하(㎡)

‘가. 합판거푸집’과 공통 적용한다.

바) 문양거푸집 - 판넬(㎡)

(1) 콘크리트 타설면의 면적으로 수량을 산출한다.

(2) 거푸집 설치(합판, 유로폼 등) 수량은 별도 산출한다.

사) 유로폼 – 벽체, 보통, H=0～7m이하(㎡)

(1) 콘크리트 타설면의 면적으로 수량을 산출한다.

(2) 연직높이 0～7m를 기준으로 매 3m 증가마다 수량을 별도 산출한다.

(3) 유로폼의 인력투입은 아래표를 기준으로 하며, 구조물 형상 또는 현장 조건에 제한을 받는

경우에는 이를 고려하여 결정할 수 있다.

구분	유형
복잡	토목 : 교대, 날개벽 등 복잡하고 보강이 많은 구조 건축 : 외부 벽체, 보/기둥
보통	측구, 수로, 옹벽, 일반적인 벽체, 박스 등
간단	수문 또는 관의 기초, 건축 매트기초 등 간단한 구조

3) 강관비계 - 3개월(㎡)

<그림 5> 비계매기(예시)

4) 시스템비계 - 3개월(㎡)

3)∼4) 공통

가) 수량은 면적으로 산출하며, 산식은 ‘(높이-0.5m)×연장’이다.

나) 연직높이 10m를 기준으로 하고 매 10m 증가마다 수량을 별도 산출한다.

다) 비계를 설치할 때에는 일체형 작업발판(시스템 비계)을 의무적으로 설계에 반영하여야 한다. 다만, 일체형 작업발판(시스템비계) 설치가 곤란한 경사지, 복잡한 구조형식, 비정형구조물, 지반 등 현지여건으로 시스템비계를 사용할 수 없는 경우에는 감독자의 사전승인을 득한 후 강관비계(추락방호망 병행설치)를 적용할 수 있다.

5) 가설계단 - 3개월(m)

가) 경사형-H=6m이하(㎡)

(1) 수량은 필요 시, 디딤판의 설치면적(계단참포함)으로 산출한다.

나) 타워형(㎡)

(1) 수량은 필요 시, 디딤판의 설치면적(계단참포함)으로 산출한다.

(2) 현장여건에 따라 침하 및 전도방지를 위한 받침 콘크리트 설치 및 철거 수량을 별도로      산출한다.

6) 강관동바리

가) 강관동바리 - 3개월(공/㎥)

(1) 수량은 공/㎥(체적)로 산출한다.

(2) 연직높이 2.5m이하, 2.5m초과～3.5m이하, 3.5m초과～4.2m이하로 구분하여 산출한다.

(3) 멍에간격을 기준하여 설치간격(0.6m이하, 0.6m초과～0.8m이하, 0.8m초과)에 따른 수량을 별도 산출한다.

나) 시스템동바리 - 3개월(공/㎥)

(1) 수량은 공/㎥(체적)로 산출한다.

(2) 연직높이 10m를 기준으로 매 10m 증가마다 수량을 별도 산출한다.

(3) 멍에간격을 기준하여 설치간격(0.6m이하, 0.6m초과∼1.2m이하, 1.2m초과)에 따른 수량을   별도로 산출한다.

<그림 6> 동바리(예시)

다) 수평연결재 설치 - 3개월(㎡)

(1) 수량은 동바리의 1단 면적(㎡)으로 산출한다.

(2) 멍에간격을 기준하여 설치간격(0.6m이하, 0.6m초과∼0.8m이하, 0.8m초과)에 따른 수량을   별도로 산출한다.

7) 시공이음면정리(㎡)

선타설 콘크리트의 타설면을 기계 치핑하는 것이며, 면적으로 산출한다.

8) 버팀목설치 - D200×600mm(개소)

가) 버팀목은 버팀보 철거 직후 토압을 막아주기 위해 파일에 설치한다.

나) 본선수량은 ‘H-파일 종간격수량×3개소×2(양측)’로 산출한다.

다) 정거장, 환기구 등은 ‘H-파일 종간격수량×3개소×2(양측)+H-파일 종간격수량×(층수-1)×2개소×2(양측)’로 산출한다.

9) 매입전설치(조)

가) 전철주를 설치하기 위해 구체콘크리트에 매입하며 종방향 5m마다 설치한다.

나) 복선일 때 수량은 (연장÷5m×2)로 산출하고, 단선일 때 수량은 (연장÷5m)로 산출한다.

10) 인서트설치 - 9mm(㎡)

가) 건축 천장 마감판을 설치하기 위하여 토목에서 인서트를 미리 매입한다.

나) 수량은 천장의 면적으로 산출한다.

11) 열차대피손잡이 설치 - 스텐레스(개소)

중간 기둥이 있는 복선BOX는 기둥위치에 1개소, 중간 기둥이 없는 복선BOX는 좌우측 5m마다 1개소씩 산출한다.

12) 중앙말뚝방수(개소)

수량은 중앙말뚝의 본수와 동일하다.

13) 스페이서 설치

가) 스페이서 설치 - 벽체(㎡)

수량은 스페이서 설치 면적으로 산출한다.

나) 스페이서 설치 - 슬래브 및 기초(㎡)

수량은 스페이서 설치 면적으로 산출한다.

14) 철근현장가공조립

가) 철근현장가공조립 – Type-Ⅱ-1(톤)

① 수량은 도면(구조도)에 의해 산출된 철근의 NET ton수로 한다.

② 철근 가공 및 조립의 Type은 아래 표 유형의 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에 적용한다.

구 분		유 형
Type-Ⅰ	Ⅰ-1	- 철근가공 및 조립 작업이 일반적인 토목시설 (반중력식 옹벽, L형 옹벽, 교량 슬래브, 매트기초, 수문 등)
	Ⅰ-2	- 특정위치에서 철근의 가공 및 조립이 반복되는 경우 (빔제작, 철근망 등)
Type-Ⅱ	Ⅱ-1	- 철근가공 및 조립 작업이 복잡한 토목시설(라멘교, 교대, 암거, 지하차도, 부벽식옹벽 등) - Type-Ⅰ 시설에서 직경 13mm이하 철근이 전 철근중량의 50%이상인 경우
	Ⅱ-2	- 콘크리트대비 소량의 철근이 사용되는 경우(측구/개거, 중력식 옹벽, 일체형 중앙분리대 등)
Type-Ⅲ	Ⅲ	- 철근가공 및 조립 작업이 매우 복잡한 토목시설 (교각, 구주식 교대 - 특수 구조시설물에서 철근직경 35mm를 초과하여 인력에 의한 단독시공이 어려운 경우(플랜트, 원자력 발전소 등)

다. 배수시설

1) 배수로뚜껑제작설치 - 350×290×80mm(개)

가) 개착BOX의 설치연장을 0.4로 나눈 갯수로 산출한다.

나) 뚜껑제작에 소요되는 콘크리트, 거푸집, 와이어메쉬 등은 별도의 재료표로 작성한다.

2) 공동구뚜껑제작설치 - 480×350×80mm(개)

가) 개착BOX의 설치연장을 0.4로 나눈 갯수로 산출한다.

나) 뚜껑제작에 소요되는 콘크리트, 거푸집, 와이어메쉬 등은 별도의 재료표로 작성한다.

3) 배수공설치 - PVC PIPE, D100mm(m)

배수공 수량은 기울어진 상태를 감안한 연장으로 산출한다.

라. 신축이음

1) 신축이음채움 - Hard Form(㎡)

신축이음면의 면적으로 수량을 산출한다.

2) 수팽창지수재 설치 – 30×30mm(m)

가) 지수재의 설치연장으로 수량을 산출한다.

나) 콘크리트 구조물 이음부에 신축이나 진동으로 균열 발생시 누수방지의 효과를 얻을 수 있다.

다) 지수재의 유해한 균열, 홈 등이 없어야 한다.

3) 지수판 설치 - PVC, 300×9T(m)

지수판의 설치연장으로 수량을 산출한다.

<그림 7> 지수판 설치 상세(예시)

3. 방수공

가. 방수공

1) 방수의 목적은 외부로부터 지하수 침입을 방지하여 내부의 제시설(궤도, 전기, 건축마감, 역시설 등)을 보호하고 구조물의 이용가치를 저하시키지 않도록 하기 위함과 동시에 승객 및 관계직원에게 보건위생상의 문제가 일어나지 않도록 하는데 있다.

2) 시트방수

가) 방수재에 손상이 가지 않도록 시공기면의 돌출부나 잡물을 없애서 평탄하게 정리한다.

나) 프라이머(접착제) 도포는 균일하게 요철없이 바른다.

다) 프라이머 도포후 건조시간은 용제가 발휘하여 거의 붙점착이 될 때까지 유지시키지 않으면 잔존용제로 인하여 시트를 팽창시키거나 부풀음과 주름이 생기는 원인이 된다.

라) 시트의 겹치기 이음폭은 100mm 이상으로 하고 방수층의 이음부는 다음 시공시기까지 충분히 보호해야 한다.

3) 벤토나이트계 방수

가) 바닥에 물기가 있는 경우 P.E필름을 100mm 이상 겹쳐서 깔아 벤토나이트 방수층의 조기 수화를 막는다.

나) 벤토나이트 매트의 경우 방수재 직포면이 구조물에 접하도록 시공한다.

다) 방수재는 최소 100mm 정도를 겹친 후 300mm 간격으로 못과 와셔로 고정한다.

나. 보호모르타르 설치

1) 상부보호모르타르 - 1:3, T=50mm(㎡)

가) 시트방수재를 외부로부터 보호하기 위하여 시트의 겉면을 모르타르로 바르는 수량이다.

나) 방수를 실시하는 상부면의 면적으로 수량을 산출한다.

2) 벽체보호모르타르 - 1:3, T=5mm(㎡)

가) 시트방수재를 외부로부터 보호하기 위하여 시트의 겉면을 모르타르로 바르는 수량이다.

나) 방수를 실시하는 벽체면의 면적으로 수량을 산출한다.

3) 하부보호모르타르 - 1:3, T=30mm(㎡)

가) 시트방수재를 외부로부터 보호하기 위하여 시트의 겉면을 모르타르로 바르는 수량이다.

나) 방수를 실시하는 바닥면의 면적으로 수량을 산출한다.

4) 바닥고르기모르타르 - 1:3, T=10mm(㎡)

가) 구조물의 바닥콘크리트는 고르기를 하더라도 골재 등으로 인하여 평평하게 하기 곤란할 경우가 있으므로 모르타르를 이용하여 바닥을 평평하게 골라주는 수량이다.

나) 방수를 실시하는 바닥면의 면적으로 수량을 산출한다.

다. 방수시트 설치

1) 아스팔트방수시트

가) 아스팔트 방수시트 - 상하부, T=3mm(㎡)

상부 및 하부를 시트방수재로 방수하는 수량이다.

나) 아스팔트 방수시트 - 벽체, T=3mm(㎡)

벽체를 시트방수재로 방수하는 수량이다.

다) 아스팔트 방수시트 - 보강부, T=3mm(㎡)

상부 및 하부와 벽체의 연결부를 시트방수재로 보강 방수하는 수량이다.

2) 자착식방수시트

가) 자착식방수시트 - 상하부(㎡)

상부 및 하부를 자착식방수시트로 방수하는 수량이다.

나) 자착식방수시트 - 벽체(㎡)

벽체를 자착식방수시트로 방수하는 수량이다.

‘아스팔트방수시트’를 공통 적용한다.

3) 벤토나이트방수시트

가) 벤토나이트방수시트 - 상하부, T=4.5mm(㎡)

나) 벤토나이트방수시트 - 벽  체, T=4.5mm(㎡)

‘아스팔트방수시트’를 공통 적용한다.

4. 보온공사비

1) 동절기 개착박스의 보온을 위해 차단막을 설치하고 열풍기를 가동하는 수량이다.

2) 동절기의 적용기간은 12월～익년 2월까지 3개월로 한다.

3) 수량은 {구조물폭×(양단부 + 1Span 길이)}로 산출한다.

Ⅱ-2. 지하차도

가. 콘크리트 타설

1) 바닥콘크리트 - 무근, 펌프차(㎥)

(1) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘2-나-1)-가) 바닥콘크리트 타설 - 무근, 펌프차사용’ 참조

2) 구체콘크리트 - 철근, 펌프차(㎥)

가) 콘크리트 타설 - 펌프차, 붐타설(㎥)

(1) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘2-나-1)-나) 구체콘크리트 타설 - 철근, 펌프차사용’ 참조

나. 거푸집

1) 합판거푸집 - 6회, H=0～7m(㎡)

(1) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘2-나-2)-가) 합판거푸집 - 6회, H=0～7m이하’ 참조

2) 합판거푸집 - 4회, H=0～7m(㎡)

(1) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘2-나-2)-나) 합판거푸집 - 4회, H=0～7m이하’ 참조

3) 합판거푸집 - 3회, H=0～7m(㎡)

(1) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘2-나-2)-다) 합판거푸집 - 3회, H=0～7m이하’ 참조

4) 문양거푸집 - 판넬(㎡)

(1) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘2-나-2)-바) 문양거푸집 - 판넬’ 참조

5) 유로폼 - 벽체, 보통, H=0～7m(㎡)

(1) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘2-나-2)-사) 유로폼 - 벽체, 보통, H=0～7m’ 참조

다. 구조물비계

1) 강관비계 - 3개월(㎡)

(1) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘2-나-3) 강관비계 - 3개월’ 참조

2) 시스템비계 - 3개월(㎡)

(1) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘2-나-4) 시스템비계 - 3개월’ 참조

3) 가설계단 - 3개월(m)

가) 경사형-H=6m이하(㎡)

(1) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘2-나-5)-가) 경사형 - H=6m이하’ 참조

나) 타워형(㎡)

(1) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘2-나-5)-나) 타워형’ 참조

라. 동바리

1) 강관동바리 - 3개월(공/㎥)

(1) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘2-나-6)-가) 강관동바리 - 3개월’ 참조

2) 시스템동바리 - 3개월(공/㎥)

(1) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘2-나-6)-나) 시스템동바리 - 3개월’ 참조

3) 수평연결재 설치 - 3개월(㎡)

(1) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘2-나-6)-다) 수평연결재 설치 - 3개월’ 참조

마. 시공이음면정리(㎡)

1) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘2-나-7) 시공이음면정리’ 참조

바. 신축이음장치

1) 신축이음 - 스티로폼, T=20mm(㎡)

수량은 신축이음면의 면적으로 산출한다.

2) 다웰바 설치 - D25×1000mm(개)

가) 다웰바 수량은 설치간격을 고려한 갯수로 산출한다.

나) 다웰바 설치에 소요되는 기타공종(PVC PIPE, PVC CAP, 녹막이페인트, 채움재 등)의 수량은 별도로 산출하지 않는다.

3) 충진재 채움 - 실런트, 20×20mm(m)

충진재 채움은 연장으로 수량을 산출한다.

4) 지수판 설치 - PVC, 300×9T(m)

(1) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘2-라-3) 지수판 설치 - PVC, 300×9T’ 참조

사. 방수공

1) 아스팔트방수

가) 아스팔트방수 - 벽체,2회(㎡)

지하차도의 외측 벽체를 아스팔트 방수재로 방수하는 수량이다.

나) 아스팔트방수 - 바닥,2회(㎡)

지하차도의 상부슬래브를 아스팔트 방수재로 방수하는 수량이다.

2) 시트방수

가) 시트방수 - 상․하부,T=3mm(㎡)

(1) 상부 및 하부를 시트방수재로 방수하는 수량이다.

(2) 시트의 상호 연결부는 100mm 이상 겹치도록 수량을 산출한다.

나) 시트방수 - 벽체,T=3mm(㎡)

(1) 벽체를 시트방수재로 방수하는 수량이다.

(2) 시트의 상호 연결부는 100mm 이상 겹치도록 수량을 산출한다.

다) 시트방수 - 보강부,T=3mm(㎡)

상부 및 하부와 벽체의 연결부를 시트방수재로 보강 방수하는 수량이다.

3) 모르타르

가) 바닥고르기모르타르 - 1:3,T=10mm(㎡)

(1) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘3-나-4) 바닥고르기모르타르 - 1:3,T=10mm’ 참조

나) 상부보호모르타르 - 1:3,T=50mm(㎡)

(1) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘3-나-1) 상부보호모르타르 - 1:3,T=50mm’ 참조

다) 바닥보호모르타르 - 1:3,T=30mm(㎡)

(1) 시트방수재를 외부로부터 보호하기 위하여 시트의 겉면을 모르타르로 바르는 수량이다.

(2) 방수를 실시하는 바닥면의 면적으로 수량을 산출한다.

라) 벽체보호모르타르 - 1:3,T=5mm(㎡)

(1) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘3-나-2) 벽체보호모르타르 - 1:3,T=5mm’ 참조

4) 시멘트벽돌쌓기 - 벽체,0.5B(㎡)

가) 구조물의 벽체는 되메우기 등의 작업을 할 때 방수재가 손상될 염려가 크므로 보호모르타르의 외측에 벽돌로 보호벽을 형성한다.

나) 방수를 실시하는 벽체면의 면적으로 수량을 산출한다.

아. 배수시설

1) 배수뒷잡석채움(㎥)

가) 수로콘크리트나 옹벽공의 배수공 등 소규모 잡석채움에 적용한다.

나) 수량은 체적으로 산출한다.

2) 드레인보드 설치 - T=20mm(㎡)

가) 드레인보드의 설치수량은 면적으로 산출한다.

나) 옹벽 상부에서 0.50m 하단에서 배수공 아래 0.50m 하단까지의 길이에 옹벽연장을 곱하여 산출한다.

3) 부직포 설치 - 300g/㎡(㎡)

(가) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘1-아-2) 부직포설치 - 300g/㎡’ 참조.

4) 배수공 설치 - PVC Pipe,D75mm(m)

배수공 수량은 기울어진 상태를 감안한 연장으로 산출한다.

5) 스틸그레이팅 설치 - 각종(개)

가) 수로공의 뚜껑이 필요할 경우 갯수로 수량을 산출한다.

나) 수량산출서상에 스틸그레이팅의 규격을 명시한다.

6) 공동구콘크리트타설 – 기계타설(m)

가) 기계타설(콘크리트 피니셔)이 가능한 구간에 적용한다.

나) 설치 연장으로 수량을 산출한다.

자. 스페이서설치

1) 스페이서 설치 - 벽체용(㎡)

(가) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘2-나-13)-가) 스페이서 설치 - 벽체’ 참조.

2) 스페이서 설치 - 슬래브 및 기초용(㎡)

(가) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘2-나-13)-나) 스페이서 설치 - 슬래브 및 기초’ 참조.

차. 커플러설치 - 각종(개)

1) 철근은 원칙적으로 겹이음을 기준으로 하지만 부득이 모멘트가 크게 작용하는 부근이나 모멘트변곡점에 철근이음을 둘 경우에는 커플러와 같은 기계적 이음을 사용한다.

2) 철근의 이음 개소로 수량을 산출한다.

카. 철근현장가공조립

1) 철근현장가공조립 – Type-Ⅱ-1(ton)

(가) ‘Ⅱ-1. 개착식 BOX’의 ‘2-나-14)-가) 철근현장가공및조립 - 보통’ 참조.

타. 타일붙이기

1) 자기질타일붙이기 - 벽체, 떠붙이기, 110×190×15mm(㎡)

2) 자기질타일붙이기 - 벽체, 압착붙이기, 90×190×15mm(㎡)

설계도면에 따라 면적으로 수량을 산출한다.

파. 지하차도 조명(식)

조명설비는 설계도면에 따라 재료표를 산출하여 1식으로 계상한다.

하. 펌프설비공사(식) - 펌프포함

펌프설비는 설계도면에 따라 재료표를 산출하여 1식으로 계상한다.

거. 파이프루프공법

1) 강관추진 - 토사,D600mm(m)

가) 지보공으로 설치되는 강관의 추진 길이로 산출한다.

나) 전체 추진장별, 토질별로 분리하여 산출한다.(단가적용기준 참조)

2) 강관제작설치 - D600mm,ℓ=16m(m)

강관 추진의 전 연장이다.

3) 기계이동설치

가) 기계이동설치 - KA-MO, 수직(회)

강관추진기의 수직방향 이동 및 설치에 대한 횟수로 산출한다.

나) 기계이동설치 - KA-MO, 수평(회)

강관추진기의 수평방향 이동 및 설치에 대한 횟수로 산출한다.

4) 강관내그라우팅 - 1:3(㎥)

가) 추진된 강관내를 그라우팅으로 채우는 수량이다.

나) 수량은 강관내부의 전체적으로 산출한다.

너. 프론트재킹공법

1) 수평천공 - D150mm, 점성토(m)

PC 강선 설치를 위한 지반의 천공 수량이며, 토질별로 분리 산출한다.

2) PC강선 설치철거 - 8t-15.2mm(m)

PC 강선의 전체 설치수량을 연장으로 산출한다.

3) 정착구 설치철거(조)

PC 강선 정착을 위한 정착구의 설치개소로 산출한다.

4) 잭 설치철거

가) 잭 설치철거 - 프론트잭(대)

나) 잭 설치철거 - 페이스잭(대)

프론트잭 및 페이스잭의 소요대수를 산정하여 산출한다.

5) 선단슈 관입 - 구조물단면적, 80～100㎡(개소)

구조물 단면적별로 구분하여 산출한다.

6) BOX굴착 및 견인 - 구조물단면적, 60～80㎡(m)

구조물 단면적, 토질별로 구분하여 산출하며, 굴착토 소운반은 별도 계상하여야 한다.

더. 지하차도 부대공

1) 난간설치 - 스텐레스, H = 1.00m(m)

난간설치의 연장으로 수량을 산출한다.

2) 통과높이표지판설치 - D600mm(개)

표지판의 설치위치, 규격, 개수 등을 구분하여 산출한다.

Ⅲ. 단가산출(예시)

- 단가적용시 현장여건에 따라 작업효율, 적용장비, 운반거리 등을 고려하여야 하며, 건설공사 표준품셈의 개정, 공단기준의 변경 등을 반영한 최신의 품을 적용하여야 한다.

Ⅲ-1. 개착식 BOX

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
1	토 공
1.01	줄파기(H = 1.50m)
a	줄파기 (포장구간,측면파일)	m	1. 수량산출 1) 아스팔트 깨기:0.20m×1.0m×1.0m = 0.20㎥/m 2) 인력굴착(토사):1.30m×1.0m×1.0m = 1.30㎥/m 3) 되 메 우 기:1.30m×1.0m×1.0m = 1.30㎥/m 2. 아스팔트깨기 1) 아스팔트절단(기계):2m 2) 아스팔트 포장철거(기계):0.2㎥/m 3. 인력굴착 1) 현장 지질상태에 따라 변경할 수 있다 2) 주위에 장애물이 없고, 넒은 구역의 터파기인 경우에는 시공량을 40%까지 가산한다. 3) 일당 시공량 Q = 3.6 ㎥/일 4) 보통토사 : 특별인부 1인/일 / Q ㎥/일×1.30㎥/m 4. 되메우기(인력) 1) 일당 시공량 Q2 = (18+24)/2㎥/일 / 1.30㎥/m 2) 특별인부: 1인/일 / Q2m/일 3) 보통인부: 1인/일 / Q2m/일 4) 플레이트콤팩터(1.5ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q2m/일	[공통] 3-2-1 굴착 (인력/토사) [공통] 3-4-3 흙다지기
b	줄파기 (포장구간,중앙파일)	m	1. 수량산출 1) 아스팔트 깨기:0.20m×1.0m×1.0m = 0.20㎥/m 2) 인력굴착(토사):1.30m×1.0m×1.0m = 1.30㎥/m 2. 아스팔트깨기 1) 아스팔트절단(기계):2m 2) 아스팔트 포장철거(기계):0.2㎥/m 3. 인력굴착 1) 현장 지질상태에 따라 변경할 수 있다 2) 주위에 장애물이 없고, 넒은 구역의 터파기인 경우에는 시공량을 40%까지 가산한다. 3) 일당 시공량 Q = 3.6 ㎥/일 4) 보통토사 : 특별인부 1인/일 / Q ㎥/일×1.30㎥/m	[공통] 3-2-1 굴착 (인력/토사)
c	줄파기 (비포장구간,측면파일)	m	1. 수량산출 1) 인력굴착(토사):1.50m×1.0m×1.0m = 1.50㎥/m 2) 되 메 우 기:1.50m×1.0m×1.0m = 1.50㎥/m 2. 인력굴착 1) 현장 지질상태에 따라 변경할 수 있다 2) 주위에 장애물이 없고, 넒은 구역의 터파기인 경우에는 시공량을 40%까지 가산한다. 3) 일당 시공량 Q = 3.6 ㎥/일 4) 보통토사 : 특별인부 1인/일 / Q ㎥/일×1.30㎥/m 3. 되메우기(인력) 1) 일당 시공량 Q2 = (18+24)/2㎥/일 / 1.30㎥/m 2) 특별인부: 1인/일 / Q2m/일 3) 보통인부: 1인/일 / Q2m/일 4) 플레이트콤팩터(1.5ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q2m/일	[공통] 3-2-1 굴착 (인력/토사) [공통] 3-4-3 흙다지기

번호

공      종

단위

단 가 산 출 (예 시)

비  고

1.02

땅깎기

a

토사깎기

a-1

토사깎기 (기계,소규모)

㎥

1. 작업조건

1) 토공 장비에 의한 깎기, 집토 작업을 포함한다.

2) 일당 시공량 참조(㎥/일)

구 분	보통토사	혼합토사
시공량	310	230

3) 일당 시공량(보통토사) Q = 310㎥/일

2. 중기사용료

1) 굴착기(1.0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

[공통] 3-2-3 흙깎기 (기계)

a-2

토사깎기

(기계,중규모)

㎥

1. 작업조건

1) 토공 장비에 의한 깎기, 집토 작업을 포함한다.

2) 일당 시공량 참조(㎥/일)

구 분	보통토사	혼합토사
시공량	560	390

3) 일당 시공량(보통토사) Q = 560㎥/일

2. 중기사용료

1) 굴착기(1.0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

[공통] 3-2-3 흙깎기 (기계)

a-3

토사깎기

(기계,대규모)

㎥

1. 작업조건

1) 토공 장비에 의한 깎기, 집토 작업을 포함한다.

2) 일당 시공량 참조(㎥/일)

구 분	보통토사	혼합토사
시공량	930	640

3) 일당 시공량(보통토사) Q = 930㎥/일

2. 중기사용료

1) 굴착기(1.0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

[공통] 3-2-3 흙깎기 (기계)

b

풍화암깎기

(기계)

㎥

1. 작업조건

1) 일당 시공량 Q = 65㎥/일

2. 중기사용료

1) 굴착기(1.0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

2) 대형브레이커(1.0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

3) 소모재료(치즐)는 깎기장비(굴착기) 기계경비(재료비, 노무비, 경비)의 1%

3. 집토 작업

1) 일당 시공량 Q = 550㎥/일

2) 불도저(32ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

[공통] 3-2-3

흙깎기

(기계)

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c	연암깎기 (기계)	㎥	1. 작업조건 1) 일당 시공량 Q = 50㎥/일 2. 중기사용료 1) 굴착기(1.0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 2) 대형브레이커(1.0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 3) 소모재료(치즐)는 깎기장비(굴착기) 기계경비(재료비, 노무비, 경비)의 2% 3. 집토 작업 1) 일당 시공량 Q = 520㎥/일 2) 불도저(32ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일	[공통] 3-2-3 흙깎기 (기계)
d	경암깎기 (기계)	㎥	1. 작업조건 1) 일당 시공량 Q = 25㎥/일 2. 중기사용료 1) 굴착기(1.0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 2) 대형브레이커(1.0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 3) 소모재료(치즐)는 깎기장비(굴착기) 기계경비(재료비, 노무비, 경비)의 7% 3. 집토 작업 1) 일당 시공량 Q = 450㎥/일 2) 불도저(32ton):(1.0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일	[공통] 3-2-3 흙깎기 (기계)
1.03	굴 착
a	굴착(비복공구간)
a-1	굴착 (토사,0～2m이하)	㎥	1. 굴착조건 1) 기본동작(180°):22초 2) 작 업 구 간:50m×2/1000m = 0.1㎞ 3) 덤프트럭전후진속도:3㎞/hr 4) 덤프트럭대기시간:0.10㎞×1/3×3600초 = 120초 2. 굴착 및 적재(굴착기 0.70㎥) q = 0.70㎥ , L = 1.25 , K = 0.90 f = 1/1.25 = 0.8 , E = (0.55+0.45)/2 = 0.5초 Qt = 15ton/1.60ton/㎥×1.25 = 11.72㎥ N = 11.72㎥/(0.70㎥×0.90) = 18.6회 Cm1 = 22초 , Cm2 = (120초-22초)/18.6회 = 5.27초 Cms = 22초+5.27초 = 27.27초 Q = (3600초×0.70㎥×0.90×0.80×0.50)/27.27초 = 33.27㎥/hr	[공통] 8-2-3 굴착기
a-2	굴착 (토사,2m이하)	㎥	1. 장비 및 인력 비율계산 1) 전체 굴착폭:24.00m 2) 장 비 굴 착:20.50m 3) 비 율 계 산:20.50m/24.00m = 0.854 4) 인 력 굴 착:3.50m 5) 비 율 계 산:3.50m/24.00m = 0.146 2. 기계굴착 및 적재(굴착기 0.70㎥) 1) 기본동작(180°):22초 2) 작 업 구 간:50m×2/1000m = 0.1㎞ 3) 덤프트럭전후진속도:3㎞/hr 4) 덤프트럭적재대기 q0 = 0.70㎥, K = 0.90 , L = 1.25 , f = 1/1.25 = 0.80 Qt = 15ton/1.60ton/㎥×1.25 = 11.72㎥ N = 11.72㎥/(0.70㎥×0.90) = 18.6회	[공통] 8-2-3 굴착기

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			5) 덤프트럭대기시간:0.10㎞×1/3×3600초 = 120초 6) 굴착기 Cm에 추가되는시간 E = 0.45 , Cm1 = 22초 Cm2 = (120초-22초)×1/18.60회 = 5.27초 Cms = 22초+5.22초 = 27.27초 Q1 = (3600초×0.70㎥×0.90×0.80×0.45)/27.27초 = 29.94㎥/hr Q = 29.94㎥/hr/0.854(기계비율) = 35.06㎥/hr 3. 인력절취 및 집토 ∴ 일당 시공량 Q = (3.6+2.7)/2㎥/일 1) 특별인부 1인/일 / Q ㎥/일×0.146(인력비율) 2) 불도저집토(19ton) D = 20m , q0 = 3.20×0.96 = 3.07㎥ V1 = 55m/분 , V2 = 70m/분 E = (0.55+0.45)/2×2/3(능률저하감안 2/3적용) = 0.33 Cm = 20m/55m/분+20m/70m/분+0.25 = 0.9분 Q1 = (60분×3.07㎥×0.80×0.33)/0.90분 = 54.03㎥/hr Q = 54.03㎥/hr/0.146(인력비율) = 370.07㎥/hr 3) 적재(로더(무한궤도),1.72㎥) q0 = 1.72㎥, Es = (0.60+0.50)/2 = 0.55 , K = 1.00 t1 = 9초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 2초/m Cm1 = 2m×8m+9초+14초 = 39초 Qt = 15ton/1.60ton/㎥×1.25 = 11.72㎥ N = 11.72㎥/(1.72㎥×1.00) = 6.81회 Cm2 = 2m×8m/2+9초 = 17초 Cms = 39.00초+(17.00초/6.81회) = 41.50초 Q1 = (3600초×1.72㎥×1.00×0.80×0.55)/41.50초 = 65.65㎥/hr Q = 65.65㎥/hr/0.146(인력비율) = 449.66㎥/hr	[공통] 3-2-1 굴착 (인력/토사) [공통] 8-2-1 불도저 [공통] 8-2-5 로더
a-3	굴착(풍화암,2m이하)	㎥	1. 장비 및 브레이커 비율계산 1) 전체 굴착폭:24.00m 2) 장 비 굴 착:20.50m 3) 비 율 계 산:20.50m/24.00m = 0.854 4) 브레이커굴착:3.50m 5) 비 율 계 산:3.50m/24.00m = 0.146 2. 굴착(불도저,19ton) 1) 리핑작업(Ripping) D = 20m , An = 0.15㎥ , f = 1.00 E = 0.50 , Cm = 0.05×20m+0.25 = 1.25분 Q1 = (60분×0.15×20m×1.00×0.50)/1.25분 = 72㎥/hr 2) 불도저작업(19ton) qo = 3.20×0.96 = 3.07 ㎥ , L = 1.30 , f = 1/1.30 = 0.77 V1 = 55m/분 , V2 = 70m/분 , E = 0.25 Cm = 20m/55m/분+20m/70m/분+0.25 = 0.9분 Q2 = (60분×3.07㎥×0.77×0.25)/0.90분 = 39.4㎥/hr 3) 장비조합 Q3 = (72.00㎥/hr×39.40㎥/hr)/(72.00㎥/hr+39.40㎥/hr) = 25.46㎥/hr Q = 25.46㎥/hr/0.854(기계비율) = 29.81㎥/hr	[공통] 8-2-2 리퍼(유압식) [공통] 8-2-1 불도저

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			3. 파일주변 기계굴착 1) 브레이커 굴착 ∴ 작업량:5.50㎥/hr/0.146(브레이커비율) = 37.67㎥/hr ① 대형브레이커(0.70㎥):37.67㎥/hr ② 굴착기(0.70㎥):37.67㎥/hr ③ 치 즐 소모량(0.70㎥):0.006본/hr/37.67㎥/hr = 0.0002본/㎥ 2) 브레이커 굴착분 집토(19ton) D = 20m , q0 = 3.20×0.96 = 3.07㎥ V1 = 40m/분 , V2 = 46m/분 , E = 0.35 Cm = 20m/40m/분+20m/46m/분+0.25 = 1.18분 Q1 = (60분×3.07㎥×0.77×0.35)/1.18분 = 42.07㎥/hr Q = 42.07㎥/hr/0.146(브레이커비율) = 288.15㎥/hr 4. 적재(로더(무한궤도),1.72㎥) q0 = 1.72㎥, Es = 0.35 , K = 0.70 t1 = 9초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 2초/m Cm1 = 2m×8m+9초+14초 = 39초 Qt = 15ton/1.90ton/㎥×1.30 = 10.26㎥ N = 10.26㎥/(1.72㎥×0.70) = 8.52회 Cm2 = 2m×8m/2+9초 = 17초 Cms = 39.00초+(18.00초/8.52회) = 41.00초 Q = (3600초×1.72㎥×0.70×0.77×0.35)/41.00초 = 28.49㎥/hr	[공통]8-2-15 대형브레이커 [공통] 8-2-1 불도저 [공통] 8-2-5 로더
a-4	굴착(연암,2m이하)	㎥	1. 발파 및 브레이커 비율계산 1) 전체 굴착폭:24.00m 2) 발 파 굴 착:20.50m 3) 비 율 계 산:20.50m/24.00m = 0.854 4) 브레이커굴착:3.50m 5) 비 율 계 산:3.50m/24.00m = 0.146 2. 암파쇄발파 1) 재료비 ① 화약운반비:0.310㎏×0.854(발파비율) = 0.2647㎏ ② 폭약(초유폭약):0.310㎏×0.95×0.854(발파비율) = 0.2515㎏ ③ 폭약(에멀젼,20kg당1kg,기폭약): 0.310㎏×0.05×0.854(발파비율) = 0.1324㎏ ④ 전기뇌관:0.015개×0.854(발파비율) = 0.0128개 ⑤ 발파선, 전색재료 등의 잡재료 : 재료비의 5%로 계상 ⑥ 화 약 공:0.002인×0.854(발파비율) = 0.00171인 ⑦ 보통인부:0.003인×0.854(발파비율) = 0.00256인 2) 기계사용료 ① 크롤라드릴(유압식,110㎾):0.012hr×0.854(발파비율)=0.01025hr ② 유압식 크롤러드릴의 소모자재(비트,로드,생크로드, 슬리브) : 유압식 크롤러드릴 기계경비의 24%로 계상 ③ 굴착기(1.0㎥):0.004hr×0.854(발파비율) = 0.0034hr	[공통] 3-1-10 암발파 (대규모발파 TYPE-Ⅵ)

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			3) 연암집토(불도저 19ton) D = 20m , L = 1.40 , E = 0.25 f = 1/1.40 = 0.7, q1 = 3.20×0.96 = 3.07㎥ V1 = 40m/분 , V2 = 46m/분 Cm = 20m/40m/분+20m/46m/분+0.25 = 1.18분 Q1 = (60분×3.07㎥×0.71×0.25)/1.18분 = 27.71㎥/hr Q = 27.71㎥/hr/0.854(발파비율) = 32.45㎥/hr 3. 파일주변 기계굴착 1) 브레이커 굴착 ∴ 작업량:(4.50㎥/hr+5.50㎥/hr)/2/0.146 = 34.25㎥/hr ① 대형브레이커(0.70㎥):34.25㎥/hr ② 굴착기(0.70㎥):34.25㎥/hr ③ 치 즐 소모량(0.70㎥):0.006본/hr/34.25㎥/hr = 0.0002본/㎥ 2) 브레이커 굴착분 집토(19ton) D = 20m , q0 = 3.20×0.96 = 3.07㎥ V1 = 40m/분 , V2 = 46m/분 , E = 0.35 Cm = 20m/40m/분+20m/46m/분+0.25 = 1.18분 Q1 = (60분×3.07㎥×0.71×0.35)/1.18분 = 38.79㎥/hr Q = 38.79㎥/hr/0.146(브레이커비율) = 265.68㎥/hr 4. 적재(로더(무한궤도),1.72㎥) q0 = 1.72㎥, Es = 0.25 , K = 0.55 t1 = 9초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 2초/m Cm1 = 2m×8m+9초+14초 = 39초 Qt = 15ton/2.30ton/㎥×1.40 = 9.13㎥ N = 9.13㎥/(1.72㎥×0.55) = 9.65회 Cm2 = 2m×8m/2+9초 = 17초 Cms = 39.00초+(17.00초/9.65회) = 40.76초 Q = (3600초×1.72㎥×0.55×0.71×0.25)/40.76초 = 14.83㎥/hr	[공통] 8-2-1 불도저 [공통]8-2-15 대형브레이커 [공통] 8-2-3 굴착기 [공통] 8-2-1 불도저 [공통] 8-2-5 로더
a-5	굴착(경암,2m이하)	㎥	1. 발파 및 브레이커 비율계산 1) 전체 굴착폭:24.00m 2) 발 파 굴 착:20.50m 3) 비 율 계 산:20.50m/24.00m = 0.854 4) 브레이커굴착:3.50m 5) 비 율 계 산:3.50m/24.00m = 0.146 1) 재료비 ① 화약운반비:0.310㎏×0.854(발파비율) = 0.2647㎏ ② 폭약(초유폭약):0.310㎏×0.95×0.854(발파비율) = 0.2515㎏ ③ 폭약(에멀젼,20kg당1kg,기폭약): 0.310㎏×0.05×0.854(발파비율) = 0.1324㎏ ④ 전기뇌관:0.015개×0.854(발파비율) = 0.0128개 ⑤ 발파선, 전색재료 등의 잡재료 : 재료비의 5%로 계상 ⑥ 화 약 공:0.002인×0.854(발파비율) = 0.00171인 ⑦ 보통인부:0.003인×0.854(발파비율) = 0.00256인	[공통] 3-1-10 암발파 (대규모발파 TYPE-Ⅵ)

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			2) 기계사용료 ① 크롤라드릴(유압식,110㎾):0.012hr×0.854(발파비율)=0.01025hr ② 유압식 크롤러드릴의 소모자재(비트,로드,생크로드, 슬리브) : 유압식 크롤러드릴 기계경비의 24%로 계상 ③ 굴착기(1.0㎥):0.004hr×0.854(발파비율) = 0.0034hr 3) 경암집토(불도저 19ton) D = 20m , L = 1.85 , E = 0.25 f = 1/1.85 = 0.54 , q1 = 3.20×0.96 = 3.07㎥ V1 = 40m/분 , V2 = 46m/분 Cm = 20m/40m/분+20m/46m/분+0.25 = 1.18분 Q1 = (60분×3.07㎥×0.54×0.25)/1.18분 = 21.07㎥/hr Q = 21.07㎥/hr/0.854(발파비율) = 24.67㎥/hr 3. 파일주변 기계굴착 1) 브레이커 굴착 ∴ 작업량:(2.30㎥/hr+2.90㎥/hr)/2/0.146(브레이커비율) = 17.81㎥/hr ① 대형브레이커(0.70㎥):17.81㎥/hr ② 굴착기(0.70㎥):17.81㎥/hr ③ 치 즐 소모량(0.70㎥):0.03본/hr/17.81㎥/hr = 0.0017본/㎥ 2) 브레이커 굴착분 집토(19ton) D = 20m , q0 = 3.20×0.96 = 3.07㎥ V1 = 40m/분 , V2 = 46m/분 , E = 0.35 Cm = 20m/40m/분+20m/46m/분+0.25 = 1.18분 Q1 = (60분×3.07㎥×0.54×0.35)/1.18분 = 29.5㎥/hr Q = 29.50㎥/hr/0.146(브레이커비율) = 202.05㎥/hr 4. 적재(로더(무한궤도),1.72㎥) q0 = 1.72㎥, Es = 0.25 , K = 0.55 t1 = 9초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 2초/m Cm1 = 2m×8m+9초+14초 = 39초 Qt = 15ton/2.60ton/㎥×1.85 = 10.67㎥ N = 10.67㎥/(1.72㎥×0.55) = 11.28회 Cm2 = 2m×8m/2+9초 = 17초 Cms = 39.00초+(17.00초/11.28회) = 40.51초 Q = (3600초×1.72㎥×0.55×0.54×0.25)/40.51초 = 11.35㎥/hr	[공통] 8-2-1 불도저 [공통]8-2-15 대형브레이커 [공통] 8-2-3 굴착기 [공통] 8-2-1 불도저 [공통] 8-2-5 로더
b	굴착(복공구간)
b-1	굴착 (토사,0～2m이하)	㎥	1. 굴착조건 1) 기본동작(180°):22초 2) 작 업 구 간:50m×2/1000m = 0.1㎞ 3) 덤프트럭전후진속도:3㎞/hr 4) 덤프트럭대기시간:0.10㎞×1/3×3600초 = 120초 2. 굴착 및 적재(굴착기 0.70㎥) q = 0.70㎥ , L = 1.25 , K = 0.90 f = 1/1.25 = 0.8 , E = (0.55+0.45)/2 = 0.5초 Qt = 15ton/1.60ton/㎥×1.25 = 11.72㎥ N = 11.72㎥/(0.70㎥×0.90) = 18.6회 Cm1 = 22초 , Cm2 = (120초-22초)/18.6회 = 5.27초 Cms = 22초+5.27초 = 27.27초 Q = (3600초×0.70㎥×0.90×0.80×0.50)/27.27초 = 33.27㎥/hr	[공통] 8-2-3 굴착기

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b-2	굴착 (토사,2m이하)	㎥	1. 장비 및 인력 비율계산 1) 전체 굴착폭:24.00m 2) 장 비 굴 착:20.50m 3) 비 율 계 산:20.50m/24.00m = 0.854 4) 인 력 굴 착:3.50m 5) 비 율 계 산:3.50m/24.00m = 0.146 2. 기계 굴착(굴착기 0.70㎥) q0 = 0.70㎥, K = 0.70 , L = 1.25 , f = 1/1.25 = 0.80 E=0.45, Cm1=18초, Cms = 18초 Q1 = (3600초×0.70㎥×0.70×0.80×0.45)/18.00초 = 35.28㎥/hr Q = 35.28㎥/hr/0.854(기계비율) = 41.31㎥/hr 3. 인력절취 ∴ 일당 시공량 Q = (3.6+2.7)/2㎥/일 1) 특별인부 1인/일 / Q ㎥/일×0.146(인력비율) 4. Cycle Time 산출 1) 사용장비 ① 적 재:로더(1.72㎥) ② 인 양:호이스트 크레인(12ton)+버켓(3.0㎥) 2) 호이스트 크레인 Cycle Time 산출 ① 기본동작:(33초+41초)/2 = 37초 ② 싸이로에 넣는 시간:(5초+6초)/2 = 5.5초 ③ 굴착깊이 1m마다 추가시간:0.8초 ④ 평균굴착깊이에 따른 추가소요시간: 3m(설계평균 굴착깊이,예시)×0.8초 = 2.4초 Cm1 = 37.00초+5.50초+2.40초 = 44.9초 3) 낙하후 버켓에 적재시간 ① 로더 1회 적재시간 t1 = 11초 , t2 = 14초 , m = 2초/m 작업구간 평균거리 : lo = 25m(설계거리) Cm2 = 2초/m×25m+11초+14초 = 75초 ② 로더 적재횟수 q0 = 1.72㎥ , Qt = 3.0㎥ , K = 1.00 N = 3.0㎥/(1.72㎥×1.00) = 1.74회 ③ 실제 추가되는 시간 Cm3 = 44.90-(2초/m×25m/2+11초) = 8.9초 ④ 로더의 실제 추가되는 시간 Cm4 = 75.00초+8.9초/1.74회 = 80.11초 ⑤ 호이스트 작업시간 Cm5 = 44.90초+75.00초×1.74회 = 175.4초 5. 적재 및 인양비 산출 1) 버켓 적재비(로더,1.72㎥) ※ 현장여건에 따라 장비적용 q0 = 1.72㎥, E = (0.60+0.50)/2 = 0.55 , K = 1.00 Q = (3600초×1.72㎥×1.00×0.80×0.55)/80.11초 = 34.01㎥/hr 2) 버켓 인양비(호이스트 크레인 12ton+버켓 3.0㎥) q0 = 3.0㎥ , E = 0.45 , K = (1.10+0.90)/2 = 1 Q = (3600초×3.0㎥×1.00×0.80×0.45)/175.4초 = 22.17㎥/hr	[공통] 8-2-3 굴착기 [공통] 3-2-1 굴착 (인력/토사) 2016년 품셈 8-8 크램쉘 [공통] 8-2-5 로더

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b-3	굴착 (풍화암,2m이하)	㎥	1. 장비 및 브레이커 비율계산 1) 전체 굴착폭:24.00m 2) 장 비 굴 착:20.50m 3) 비 율 계 산:20.50m/24.00m = 0.854 4) 브레이커굴착:3.50m 5) 비 율 계 산:3.50m/24.00m = 0.146 2. 굴착(불도저,19ton) 1) 리핑작업(Ripping) D = 20m , An = 0.15㎥ , f = 1.00 E = 0.50 , Cm = 0.05×20m+0.25 = 1.25분 Q1 = (60분×0.15×20m×1.00×0.50)/1.25분 = 72㎥/hr 2) 불도저작업(19ton) qo = 3.20×0.96 = 3.07 ㎥ , L = 1.30 , f = 1/1.30 = 0.77 V1 = 40m/분 , V2 = 46m/분 , E = 0.25 Cm = 20m/40m/분+20m/46m/분+0.25 = 1.18분 Q2 = (60분×3.07㎥×0.77×0.25)/1.18분 = 30.05㎥/hr 3) 장비조합 Q3 = (72.00㎥/hr×30.05㎥/hr)/(72.00㎥/hr+30.05㎥/hr) = 21.2㎥/hr Q = 21.20㎥/hr/0.854(기계비율) = 24.82㎥/hr 3. 파일주변 기계굴착 1) 브레이커 굴착 ∴ 작업량:5.50㎥/hr/0.146(브레이커비율) = 37.67㎥/hr ① 대형브레이커(0.70㎥):37.67㎥/hr ② 굴착기(0.70㎥):37.67㎥/hr ③ 치 즐 소모량(0.70㎥):0.006본/hr/37.67㎥/hr = 0.0002본/㎥ 2) 브레이커 굴착분 집토(19ton) D = 20m , q0 = 3.20×0.96 = 3.07 ㎥ V1 = 40m/분 , V2 = 46m/분 , E = 0.35 Cm = 20m/40m/분+20m/46m/분+0.25 = 1.18분 Q1 = (60분×3.07㎥×0.77×0.35)/1.18분 = 42.07㎥/hr Q = 42.07㎥/hr/0.146(브레이커비율) = 288.15㎥/hr 4. Cycle Time 산출 1) 사용장비 ① 적 재:로더(1.72㎥) ② 인 양:호이스트 크레인(12ton)+버켓(3.0㎥) 2) 호이스트 크레인 Cycle Time 산출 ① 기본동작:(33초+41초)/2 = 37초 ② 싸이로에 넣는 시간:(5초+6초)/2 = 5.5초 ③ 굴착깊이 1m마다 추가시간:0.8초 ④ 평균굴착깊이에 따른 추가소요시간: 3m(설계평균 굴착깊이,예시)×0.8초 = 2.4초 Cm1 = 37.00초+5.50초+2.40초 = 44.9초	[공통] 8-2-2 리퍼(유압식) [공통] 8-2-1 불도저 [공통]8-2-15 대형브레이커 [공통] 8-2-1 불도저 2016년 품셈 8-8 크램쉘

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			3) 낙하후 버켓에 적재시간 ① 로더 1회 적재시간 t1 = 11초 , t2 = 14초 , m = 2초/m 작업구간 평균거리 : lo = 25m(설계거리) Cm2 = 2초/m×25m+11초+14초 = 75초 ② 로더 적재횟수 q0 = 1.72㎥ , Qt = 3.0㎥ , K = 0.70 N = 3.0㎥/(1.72㎥×0.70) = 2.49회 ③ 실제 추가되는 시간 Cm3 = 44.90-(2초/m×25m/2+11초) = 8.9초 ④ 로더의 실제 추가되는 시간 Cm4 = 75.00초+8.9초/2.49회 = 78.57초 ⑤ 호이스트 작업시간 Cm5 = 44.90초+75.00초×2.49회 = 231.65초 5. 적재 및 인양비 산출 1) 버켓 적재비(로더,1.72㎥) ※ 현장여건에 따라 장비적용 q0 = 1.72㎥, E = 0.35 , K = 0.70 Q = (3600초×1.72㎥×0.70×0.77×0.35)/78.57초 = 14.87㎥/hr 2) 버켓 인양비(호이스트 크레인 12ton+버켓 3.0㎥) q0 = 3.0㎥ , E = 0.40 , K = 0.70 Q = (3600초×3.0㎥×0.70×0.77×0.40)/231.65초 = 10.05㎥/hr	[공통] 8-2-5 로더 2016년 품셈 8-8 크램쉘
b-4	굴착(연암,2m이하)	㎥	1. 발파 및 브레이커 비율계산 1) 전체 굴착폭:24.00m 2) 발 파 굴 착:20.50m 3) 비 율 계 산:20.50m/24.00m = 0.854 4) 브레이커굴착:3.50m 5) 비 율 계 산:3.50m/24.00m = 0.146 2. 암파쇄발파 1) 연암 깎기 : 1㎥ ※ 흙깎기는 미진동 암파쇄굴착, 정밀진동 제어발파, 소규모진동제어발파, 중규모 진동제어발파, 일반발파, 대규모발파, 확장발파등 설계규격에 준하여 산출한다. 3. 파일주변 기계굴착 1) 브레이커 굴착 ∴ 작업량:(4.50㎥/hr+5.50㎥/hr)/2/0.146(브레이커비율) = 34.25㎥/hr ① 대형브레이커(0.70㎥):34.25㎥/hr ② 굴착기(0.70㎥):34.25㎥/hr ③ 치 즐 소모량(0.70㎥):0.006본/hr/34.25㎥/hr = 0.0002본/㎥	[공통]8-2-15 대형브레이커

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			2) 브레이커 굴착분 집토(19ton) D = 20m , q0 = 3.20×0.96 = 3.07㎥ V1 = 40m/분 , V2 = 46m/분 , E = 0.35 Cm = 20m/40m/분+20m/46m/분+0.25 = 1.18분 Q1 = (60분×3.07㎥×0.71×0.35)/1.18분 = 38.79㎥/hr Q = 38.79㎥/hr/0.146(브레이커비율) = 265.68㎥/hr 4. Cycle Time 산출 1) 사용장비 ① 적 재:로더(1.72㎥) ② 인 양:호이스트 크레인(12ton)+버켓(3.0㎥) 2) 호이스트 크레인 Cycle Time 산출 ① 기본동작:(33초+41초)/2 = 37초 ② 싸이로에 넣는 시간:(5초+6초)/2 = 5.5초 ③ 굴착깊이 1m마다 추가시간:0.8초 ④ 평균굴착깊이에 따른 추가소요시간: 3m(설계평균 굴착깊이,예시)×0.8초 = 2.4초 Cm1 = 37.00초+5.50초+2.40초 = 44.9초 3) 낙하후 버켓에 적재시간 ① 무한궤도 로더 1회 적재시간 t1 = 11초 , t2 = 14초 , m = 2초/m 작업구간 평균거리 : lo = 25m(설계거리) Cm2 = 2초/m×25m+11초+14초 = 75초 ② 로더 적재횟수 q0 = 1.72㎥ , Qt = 3.0㎥ , K = 0.55 N = 3.0㎥/(1.72㎥×0.55) = 3.17회 ③ 실제 추가되는 시간 Cm3 = 44.90-(2초/m×25m/2+11초) = 8.9초 ④ 로더의 실제 추가되는 시간 Cm4 = 75.00초+8.9초/3.17회 = 77.81초 ⑤ 호이스트 작업시간 Cm5 = 44.90초+75.00초×3.17회 = 282.65초 5. 적재 및 인양비 산출 1) 버켓 적재비(로더,1.72㎥) ※ 현장여건에 따라 장비적용 q0 = 1.72㎥, E = 0.35 , K = 0.55 Q = (3600초×1.72㎥×0.55×0.71×0.35)/77.81초 = 10.88㎥/hr 2) 버켓 인양비(호이스트 크레인 12ton+버켓 3.0㎥) q0 = 3.0㎥ , E = 0.30 , K = 0.55 Q = (3600초×3.0㎥×0.55×0.71×0.30)/282.65초 = 4.48㎥/hr	[공통] 8-2-1 불도저 2016년 품셈 8-8 크램쉘 [공통] 8-2-5 로더 2016년 품셈 8-8 크램쉘

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b-5	굴착(경암,2m이하)	㎥	1. 발파 및 브레이커 비율계산 1) 전체 굴착폭:24.00m 2) 발 파 굴 착:20.50m 3) 비 율 계 산:20.50m/24.00m = 0.854 4) 브레이커굴착:3.50m 5) 비 율 계 산:3.50m/24.00m = 0.146 2. 암파쇄발파 1) 경암 깎기 : 1㎥ ※ 흙깎기는 미진동 암파쇄굴착, 정밀진동 제어발파, 소규모진동제어발파, 중규모 진동제어발파, 일반발파, 대규모발파, 확장발파등 설계규격에 준하여 산출한다. 3. 파일주변 기계굴착 1) 브레이커 굴착 ∴ 작업량:(2.30㎥/hr+2.90㎥/hr)/2/0.146(브레이커비율) = 17.81㎥/hr ① 대형브레이커(0.70㎥):17.81㎥/hr ② 굴착기(0.70㎥):17.81㎥/hr ③ 치 즐 소모량(0.70㎥):0.03본/hr/17.81㎥/hr = 0.0017본/㎥ 2) 브레이커 굴착분 집토(19ton) D = 20m , q0 = 3.20×0.96 = 3.07 ㎥ V1 = 40m/분 , V2 = 46m/분 , E = 0.35 Cm = 20m/40m/분+20m/46m/분+0.25 = 1.18분 Q1 = (60분×3.07㎥×0.54×0.35)/1.18분 = 29.5㎥/hr Q = 29.50㎥/hr/0.146(브레이커비율) = 202.05㎥/hr 4. Cycle Time 산출 1) 사용장비 ① 적 재:로더(1.72㎥) ② 인 양:호이스트 크레인(12ton)+버켓(3.0㎥) 2) 호이스트 크레인 Cycle Time 산출 ① 기본동작:(33초+41초)/2 = 37초 ② 싸이로에 넣는 시간:(5초+6초)/2 = 5.5초 ③ 굴착깊이 1m마다 추가시간:0.8초 ④ 평균굴착깊이에 따른 추가소요시간: 3m(설계평균 굴착깊이,예시)×0.8초 = 2.4초 Cm1 = 37.00초+5.50초+2.40초 = 44.9초 3) 낙하후 버켓에 적재시간 ① 로더 1회 적재시간 t1 = 11초 , t2 = 14초 , m = 2초/m 작업구간 평균거리 : lo = 25m(설계거리) Cm2 = 2초/m×25m+11초+14초 = 75초	[공통]8-2-15 대형브레이커 [공통] 8-2-1 불도저 2016년 품셈 8-8 크램쉘

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			② 로더 적재횟수 q0 = 1.72㎥ , Qt = 3.0㎥ , K = 0.55 N = 3.0㎥/(1.72㎥×0.55) = 3.17회 ③ 실제 추가되는 시간 Cm3 = 44.90-(2초/m×25m/2+11초) = 8.9초 ④ 로더의 실제 추가되는 시간 Cm4 = 75.00초+8.9초/3.17회 = 77.81초 ⑤ 호이스트 작업시간 Cm5 = 44.90초+75.00초×3.17회 = 282.65초 5. 적재 및 인양비 산출 1) 버켓 적재비(로더,1.72㎥) ※ 현장여건에 따라 장비적용 q0 = 1.72㎥, E = 0.25 , K = 0.55 Q = (3600초×1.72㎥×0.55×0.54×0.25)/77.81초 = 5.21㎥/hr 2) 버켓 인양비(호이스트 크레인 12ton+버켓 3.0㎥) q0 = 3.0㎥ , E = 0.20 , K = 0.55 Q = (3600초×3.0㎥×0.55×0.54×0.20)/282.65초 = 2.27㎥/hr	[공통] 8-2-5 로더 2016년 품셈 8-8 크램쉘
1.04	측구굴착
a	측구굴착(비복공구간)
a-1	측구굴착(토사,인력)	㎥	1. 인건비 1) 현장 지질상태에 따라 변경할 수 있다 2) 일당 시공량 Q = 3.6㎥/일 3) 보통토사: 특별인부 1인/일 / Q ㎥/일 2. 불도저집토(19ton) D = 20m , q0 = 3.20×0.96 = 3.07㎥ , L = 1.25 V1 = 55m/분 , V2 = 70m/분 , f = 1/1.25 = 0.80 E = (0.55+0.45)/2×2/3(능률저하감안 2/3적용) = 0.33 Cm = 20m/55m/분+20m/70m/분+0.25 = 0.9분 Q = (60분×3.07㎥×0.80×0.33)/0.90분 = 54.03㎥/hr 3. 적재(로더(무한궤도),1.72㎥) q0 = 1.72㎥, Es = (0.60+0.50)/2 = 0.55 , K = 1.00 t1 = 9초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 2초/m Cm1 = 2m×8m+9초+14초 = 39초 Qt = 15ton/1.60ton/㎥×1.25 = 11.72㎥ N = 11.72㎥/(1.72㎥×1.00) = 6.81회 Cm2 = 2m×8m/2+9초 = 17 초 Cms = 40.00초+(17.00초/6.81회) = 41.50초 Q = (3600초×1.72㎥×1.00×0.54×0.55)/41.50초 = 65.65㎥/hr	[공통] 3-2-1 굴착 (인력/토사) [공통] 8-2-1 불도저 [공통] 8-2-5 로더

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
a-2	측구굴착 (풍화암,인력)	㎥	1. 측구굴착 1) 중기사용료 ① 소형브레이커(1.3㎥/min):1.26hr/㎥ ② 공기압축기(7.1㎥/min):0.30hr/㎥ ③ 에어호스(D19.1mm):0.30hr/㎥ 2) 인 건 비 ① 착 암 공:0.33인/㎥ ② 보통인부:0.16인/㎥ 3) 잡재료비(인건비의 1%) 2. 집토(19ton) D = 20m , q0 = 3.20×0.96 = 3.07 ㎥ , f = 1/1.30 = 0.77 V1 = 40m/분 , V2 = 46m/분 , E = 0.35 Cm = 20m/40m/분+20m/46m/분+0.25 = 1.18분 Q = (60분×3.07㎥×0.77×0.35)/1.18분 = 42.07㎥/hr 3. 적재(로더(무한궤도),1.72㎥) q0 = 1.72㎥, Es = 0.35 , K = 0.70 t1 = 9초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 2초/m Cm1 = 2m×8m+9초+14초 = 39초 Qt = 15ton/1.90ton/㎥×1.30 = 10.26㎥ N = 10.26㎥/(1.72㎥×0.70) = 8.52회 Cm2 = 2m×8m/2+9초 = 17초 Cms = 40.00초+(17.00초/8.52회) = 41.00초 Q = (3600초×1.72㎥×0.70×0.77×0.35)/41.00초 = 28.49㎥/hr	[공통] 3-2-2 굴착 (인력/암반) [공통]8-2-1 불도저 [공통]8-2-5 로더
a-3	측구굴착(연암,인력)	㎥	1. 측구굴착 1) 중기사용료 ① 소형브레이커(1.3㎥/min):1.68hr/㎥ ② 공기압축기(7.1㎥/min):0.48hr/㎥ ③ 에어호스(D19.1mm):0.48hr/㎥ 2) 인 건 비 ① 착 암 공:0.41인/㎥ ② 보통인부:0.21인/㎥ 3) 잡재료비(인건비의 1%) 2. 집토(19ton) D = 20m , q0 = 3.20×0.96 = 3.07 ㎥ , f = 1/1.40 = 0.71 V1 = 40m/분 , V2 = 46m/분 , E = 0.25 Cm = 20m/40m/분+20m/46m/분+0.25 = 1.18분 Q = (60분×3.07㎥×0.71×0.25)/1.18분 = 27.71㎥/hr 3. 적재(로더(무한궤도),1.72㎥) q0 = 1.72㎥, Es = 0.25 , K = 0.55 t1 = 9초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 2초/m Cm1 = 2m×8m+9초+14초 = 39초 Qt = 15ton/2.30ton/㎥×1.40 = 9.13㎥ N = 9.13㎥/(1.72㎥×0.55) = 9.65회 Cm2 = 2m×8m/2+9초 = 17 초 Cms = 40.00초+(17.00초/9.65회) = 40.76초 Q = (3600초×1.72㎥×0.55×0.71×0.25)/40.76초 = 14.83㎥/hr	[공통] 3-2-2 굴착 (인력/암반) [공통]8-2-1 불도저 [공통]8-2-5 로더

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
a-4	측구굴착(경암,인력)	㎥	1. 측구굴착 1) 중기사용료 ① 소형브레이커(1.3㎥/min):3.90hr/㎥ ② 공기압축기(7.1㎥/min):0.96hr/㎥ ③ 에어호스(D19.1mm):0.96hr/㎥ 2) 인 건 비 ① 착 암 공:0.94인/㎥ ② 보통인부:0.48인/㎥ 3) 잡재료비(인건비의 1%) 2. 집토(19ton) D = 20m , q0 = 3.20×0.96 = 3.07 ㎥ ,f = 1/1.85 = 0.54 V1 = 40m/분 , V2 = 46m/분 , E = 0.25 Cm = 20m/40m/분+20m/46m/분+0.25 = 1.18분 Q = (60분×3.07㎥×0.54×0.25)/1.18분 = 21.07㎥/hr 3. 적재(로더(무한궤도),1.72㎥) q0 = 1.72㎥, Es = 0.25 , K = 0.55 t1 = 9초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 2초/m Cm1 = 2m×8m+9초+14초 = 39초 Qt = 15ton/2.60ton/㎥×1.85 = 10.67㎥ N = 10.67㎥/(1.72㎥×0.55) = 11.28회 Cm2 = 2m×8m/2+9초 = 17 초 Cms = 40.00초+(17.00초/11.28회) = 40.51초 Q = (3600초×1.72㎥×0.55×0.54×0.25)/40.51초 = 11.35㎥/hr	[공통] 3-2-2 굴착 (인력/암반) [공통]8-2-1 불도저 [공통]8-2-5 로더

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b	측구굴착(복공구간)
b-1	측구굴착(토사,인력)	㎥	1. 인건비 1) 현장 지질상태에 따라 변경할 수 있다 2) 일당 시공량 Q = 3.6㎥/일 3) 보통토사: 특별인부 1인/일 / Q ㎥/일 2. 불도저집토(19ton) D = 20m , q0 = 3.20×0.96 = 3.07㎥ V1 = 55m/분 , V2 = 70m/분 , f = 1/1.25 = 0.8 E = (0.55+0.45)/2×2/3(능률저하감안 2/3적용) = 0.33 Cm = 20m/55m/분+20m/70m/분+0.25 = 0.9분 Q = (60분×3.07㎥×0.80×0.33)/0.90분 = 54.03㎥/hr 3. Cycle Time 산출 1) 사용장비 ① 적 재:로더(무한궤도)(1.72㎥) ② 인 양:호이스트 크레인(12ton)+버켓(3.0㎥) 2) 호이스트 크레인 Cycle Time 산출 ① 기본동작:(33초+41초)/2 = 37초 ② 싸이로에 넣는 시간:(5초+6초)/2 = 5.5초 ③ 굴착깊이 1m마다 추가시간:0.8초 ④ 평균굴착깊이에 따른 추가소요시간: 3m(설계평균 굴착깊이,예시)×0.8초 = 2.4초 Cm1 = 37.00초+5.50초+2.40초 = 44.9초 3) 낙하후 버켓에 적재시간 ① 로더(무한궤도) 1회 적재시간 t1 = 11초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 2초/m Cm2 = 2m×8m+11초+14초 = 41초 ② 로더(무한궤도) 적재횟수 q0 = 1.72㎥ , Qt = 3.0㎥ , K = 1.00 N = 3.0㎥/(1.72㎥×1.00) = 1.74회 ③ 실제 추가되는 시간 Cm3 = 44.90-(2m×8m/2+11초) = 25.90초 ④ 로더(무한궤도)의 실제 추가되는 시간 Cm4 = 42.00초+25.90초/1.74회 = 55.89초 ⑤ 호이스트 작업시간 Cm5 = 44.90초+43.00초×1.74회 = 116.24초 4. 적재 및 인양비 산출 1) 버켓 적재비(로더(무한궤도),1.72㎥) q0 = 1.72㎥, E = (0.60+0.50)/2 = 0.55 , K = 1.00 Q = (3600초×1.72㎥×1.00×0.80×0.55)/55.89초 = 48.75㎥/hr 2) 버켓 인양비(호이스트 크레인 12ton+버켓 3.0㎥) q0 = 3.0㎥ , E = 0.45 , K = (1.10+0.90)/2 = 1.00 Q = (3600초×3.0㎥×1.00×0.80×0.45)/116.24초 = 33.45㎥/hr	[공통] 3-2-1 굴착 (인력/토사) [공통]8-2-1 불도저 2016년 품셈 8-8 크램쉘 [공통]8-2-5 로더 2016년품셈 8-8 크램쉘

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b-2	측구굴착 (풍화암,인력)	㎥	1. 측구굴착 1) 중기사용료 ① 소형브레이커(1.3㎥/min):1.26hr/㎥ ② 공기압축기(7.1㎥/min):0.30hr/㎥ ③ 에어호스(D19.1mm):0.30hr/㎥ 2) 인 건 비 ① 착 암 공:0.33인/㎥ ② 보통인부:0.16인/㎥ 3) 잡재료비(인건비의 1%) 2. 집토(19ton) D = 20m , q0 = 3.20×0.96 = 3.07㎥ , f = 1/1.30 = 0.77 V1 = 40m/분 , V2 = 46m/분 , E = 0.35 Cm = 20m/40m/분+20m/46m/분+0.25 = 1.18분 Q = (60분×3.07㎥×0.77×0.35)/1.18분 = 42.07㎥/hr 3. Cycle Time 산출 1) 사용장비 ① 적 재:로더(무한궤도)(1.72㎥) ② 인 양:호이스트 크레인(12ton)+버켓(3.0㎥) 2) 호이스트 크레인 Cycle Time 산출 ① 기본동작:(33초+41초)/2 = 37초 ② 싸이로에 넣는 시간:(5초+6초)/2 = 5.5초 ③ 굴착깊이 1m마다 추가시간:0.8초 ④ 평균굴착깊이에 따른 추가소요시간: 3m(설계평균 굴착깊이,예시)×0.8초 = 2.4초 Cm1 = 37.00초+5.50초+2.40초 = 44.9초 3) 낙하후 버켓에 적재시간 ① 로더(무한궤도) 1회 적재시간 t1 = 11초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 2초/m Cm2 = 2m×8m+11초+14초 = 41초 ② 로더(무한궤도) 적재횟수 q0 = 1.72㎥ , Qt = 3.0㎥ , K = 0.70 N = 3.0㎥/(1.72㎥×0.70) = 2.49회 ③ 실제 추가되는 시간 Cm3 = 44.90-(2m×8m/2+11초) = 25.90초 ④ 로더(무한궤도)의 실제 추가되는 시간 Cm4 = 42.00초+25.90초/2.49회 = 51.40초 ⑤ 호이스트 작업시간 Cm5 = 44.90초+41.00초×2.49회 = 146.99초 4. 적재 및 인양비 산출 1) 버켓 적재비(로더(무한궤도),1.72㎥) q0 = 1.72㎥, E = 0.35 , K = 0.70 Q = (3600초×1.72㎥×0.70×0.77×0.35)/51.40초 = 22.73㎥/hr 2) 버켓 인양비(호이스트 크레인 12ton+버켓 3.0㎥) q0 = 3.0㎥ , E = 0.40 , K = 0.70 Q = (3600초×3.0㎥×0.70×0.77×0.40)/146.99초 = 15.84㎥/hr	[공통] 3-2-2 굴착 (인력/암반) [공통]8-2-1 불도저 2016년 품셈 8-8 크램쉘 [공통]8-2-5 로더 2016년 품셈 8-8 크램쉘

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b-3	측구굴착(연암,인력)	㎥	1. 측구굴착 1) 중기사용료 ① 소형브레이커(1.3㎥/min):1.68hr/㎥ ② 공기압축기(7.1㎥/min):0.48hr/㎥ ③ 에어호스(D19.1mm):0.48hr/㎥ 2) 인 건 비 ① 착 암 공:0.41인/㎥ ② 보통인부:0.21인/㎥ 3) 잡재료비(인건비의 1%) 2. 집토(19ton) D = 20m , q0 = 3.20×0.96 = 3.07㎥ , f = 1/1.40 = 0.71 V1 = 40m/분 , V2 = 46m/분 , E = 0.25 Cm = 20m/40m/분+20m/46m/분+0.25 = 1.18분 Q = (60분×3.07㎥×0.71×0.25)/1.18분 = 27.71㎥/hr 3. Cycle Time 산출 1) 조 건 ① 적 재:로더(무한궤도)(1.72㎥) ② 인 양:호이스트 크레인(12ton)+버켓(3.0㎥) 2) 호이스트 크레인 Cycle Time 산출 ① 기본동작:(33초+41초)/2 = 37초 ② 싸이로에 넣는 시간:(5초+6초)/2 = 5.5초 ③ 굴착깊이 1m마다 추가시간:0.8초 ④ 평균굴착깊이에 따른 추가소요시간: 3m(설계평균 굴착깊이,예시)×0.8초 = 2.4초 Cm1 = 37.00초+5.50초+2.40초 = 44.9초 3) 낙하후 버켓에 적재시간 ① 로더(무한궤도) 1회 적재시간 t1 = 11초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 2초/m Cm2 = 2m×8m+11초+14초 = 41초 ② 로더(무한궤도) 적재횟수 q0 = 1.72㎥ , Qt = 3.0㎥ , K = 0.55 N = 3.0㎥/(1.72㎥×0.55) = 3.17회 ③ 실제 추가되는 시간 Cm3 = 44.90-(2m×8m/2+11초) = 24.9초 ④ 로더(무한궤도)의 실제 추가되는 시간 Cm4 = 42.00초+25.90초/3.17회 = 49.17초 ⑤ 호이스트 작업시간 Cm5 = 44.90초+41.00초×3.17회 = 174.87초 4. 적재 및 인양비 산출 1) 버켓 적재비(로더(무한궤도),1.72㎥) q0 = 1.72㎥, E = 0.35 , K = 0.55 Q = (3600초×1.72㎥×0.55×0.71×0.35)/49.17초 = 17.21㎥/hr 2) 버켓 인양비(호이스트 크레인 12ton+버켓 3.0㎥) q0 = 3.0㎥ , E = 0.30 , K = 0.55 Q = (3600초×3.0㎥×0.55×0.71×0.30)/174.87초 = 7.24㎥/hr	[공통] 3-2-2 굴착 (인력/암반) [공통]8-2-1 불도저 2016년 품셈 8-8 크램쉘 [공통]8-2-5 로더 2016년 품셈 8-8 크램쉘

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b-4	측구굴착(경암,인력)	㎥	1. 측구굴착 1) 중기사용료 ① 소형브레이커(1.3㎥/min):3.90hr/㎥ ② 공기압축기(7.1㎥/min):0.96hr/㎥ ③ 에어호스(D19.1mm):0.96hr/㎥ 2) 인 건 비 ① 착 암 공:0.94인/㎥ ② 보통인부:0.48인/㎥ 3) 잡재료비(인건비의 1%) 2. 집토(19ton) D = 20m , q0 = 3.20×0.96 = 3.07㎥ , f = 1/1.85 = 0.54 V1 = 40m/분 , V2 = 46m/분 , E = 0.25 Cm = 20m/40m/분+20m/46m/분+0.25 = 1.18분 Q = (60분×3.07㎥×0.54×0.25)/1.18분 = 21.07㎥/hr 3. Cycle Time 산출 1) 사용장비 ① 적 재 : 로더(무한궤도)(1.72㎥) ② 인 양 : 호이스트 크레인(12ton)+버켓(3.0㎥) 2) 호이스트 크레인 Cycle Time 산출 ① 기본동작:(33초+41초)/2 = 37초 ② 싸이로에 넣는 시간:(5초+6초)/2 = 5.5초 ③ 굴착깊이 1m마다 추가시간:0.8초 ④ 평균굴착깊이에 따른 추가소요시간: 3m(설계평균 굴착깊이,예시)×0.8초 = 2.4초 Cm1 = 37.00초+5.50초+2.40초 = 44.9초 3) 낙하후 버켓에 적재시간 ① 로더(무한궤도) 1회 적재시간 t1 = 11초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 2초/m Cm2 = 2m×8m+11초+14초 = 41초 ② 로더(무한궤도) 적재횟수 q0 = 1.72㎥ , Qt = 3.0㎥ , K = 0.55 N = 3.0㎥/(1.72㎥×0.55) = 3.17회 ③ 실제 추가되는 시간 Cm3 = 44.90-(2m×8m/2+11초) = 25.90초 ④ 로더(무한궤도)의 실제 추가되는 시간 Cm4 = 42.00초+25.90초/3.17회 = 49.17초 ⑤ 호이스트 작업시간 Cm5 = 44.90초+41.00초×3.17회 = 174.87초 4. 적재 및 인양비 산출 1) 버켓 적재비(로더(무한궤도),1.72㎥) q0 = 1.72㎥, E = 0.25 , K = 0.55 Q = (3600초×1.72㎥×0.55×0.54×0.25)/49.17초 = 9.35㎥/hr 2) 버켓 인양비(호이스트 크레인 12ton+버켓 3.0㎥) q0 = 3.0㎥ , E = 0.20 , K = 0.55 Q = (3600초×3.0㎥×0.55×0.54×0.20)/174.87초 = 3.67㎥/hr	[공통] 3-2-2 굴착 (인력/암반) [공통]8-2-1 불도저 2016년 품셈 8-8 크램쉘 [공통]8-2-5 로더 2016년 품셈 8-8 크램쉘

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
1.05	바닥면고르기
a	바닥면고르기 (풍화암)	㎡	1. 적용기준 1) 경사면 대비 바닥면의 작업조건을 고려하여 70% 반영 2. 절토면고르기 1) 일당 시공량 Q = 120㎡/일 / (70/100) 2) 굴착기(1.0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎡/일 3) 리퍼의 기계경비 : 굴착기 기계경비의 2%	[공통] 3-5-1 절토면고르기
b	바닥면고르기 (연암)	㎡	1. 적용기준 1) 경사면 대비 바닥면의 작업조건을 고려하여 70% 반영 2. 절토면고르기 1) 일당 시공량 Q = 80㎡/일 / (70/100) 2) 굴착기(1.0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎡/일 3) 대형브레이커(1.0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎡/일	[공통] 3-5-1 절토면고르기
c	바닥면고르기 (경암)	㎡	1. 적용기준 1) 경사면 대비 바닥면의 작업조건을 고려하여 70% 반영 2. 절토면고르기 1) 일당 시공량 Q = 60㎡/일 / (70/100) 2) 굴착기(1.0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎡/일 3) 대형브레이커(1.0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎡/일	[공통] 3-5-1 절토면고르기
1.06	되메우기(개착부)
a	가적치운반(개착식 BOX→가적치장→ 개착식 BOX)

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
a-1	가적치운반 (토사,ℓ = 300m)	㎥	1. 작업조건 - 터널개착부 굴착시 발생토는 갱구에서 운반거리 300m 가적치 후 되메우기를 가정하였으나 설계시 최적의 가적치장을 조사하여 시공시 설계변경을 최소화 하여야 한다. - 장비조합:로더,3.50㎥적재→D/T 15ton 2. 개착부되메우기(개착터널현장⇒가적치장) 1) 적재(타이어로더,3.50㎥) q1 = 3.50㎥, L = 1.25 , C = 0.90 f = 0.90/1.25 = 0.72 , Es = 0.60 , K = 1.00 t1 = 9초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 1.8초/m Cms = 1.8m×8m+9초+14초 = 37.4초 Q = (3600초×3.50㎥×1.00×0.72×0.60)/37.40초 = 145.54㎥/hr 2) 운반(덤프15ton+자동덮개15ton) T = 15ton , rt = 1.60ton/㎥ , E = 0.90 qt = 15ton/1.60ton/㎥×1.25 = 11.72㎥ N = 11.72㎥/(3.50㎥×1.00) = 3.35회 t1 = 37.40초×3.35회/(60분×0.60) = 3.48분 t2 = (0.30㎞/15㎞/hr+0.30㎞/20㎞/hr)×60분 = 2.1분 t3 = 0.80분 , t4 = 0.42분, t5 = 0.50분, t6 = 1.50분 Cmt = 3.48분+2.10분+0.80분+0.42분+0.50분+1.50분 = 8.80분 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 60분×11.72㎥×0.72×0.90/8.80분 = 51.78㎥/hr 3) 가적치장고르기(불도저(무한궤도) 32ton) D = 20m , L = 1.25 , C = 0.90 f = 0.90/1.25 = 0.72 E = (0.70+0.60)/2 = 0.65 , q0 = 5.50㎥ V1 = 70m/분(전진3단) , V2 = 78m/분(후진3단) e0 = 0.96(운반거리20m) , q1 = 5.50㎥×0.96 = 5.28㎥ Cm = 20m/70m/분+20m/78m/분+0.25분 = 0.79분 Q1 = (60분×5.28㎥×0.72×0.65)/0.79분 = 187.67㎥/hr Q = 187.67㎥/hr/(1/3(작업의 제한요소가 적으므로)) = 563.01㎥/hr 3. 개착부되메우기(가적치장⇒개착터널현장) 1) 깎기 및 적재(굴착기,1.00㎥) q1 = 1.00㎥ , L = 1.25 , f = 0.90/1.25 = 0.72 Es = (0.75+0.65)/2 = 0.7 , k = 0.90 Cms = 23초(180°선회) Q = (3600초×1.00㎥×0.90×0.72×0.65)/23초=65.93㎥/hr 2) 운반(덤프15ton+자동덮개15ton) T = 15ton , rt = 1.60ton/㎥ , E = 0.90 qt = 15ton/1.60ton/㎥×1.25 = 11.72㎥ N = 11.72㎥/(1.00㎥×0.90) = 13.02회 t1 = 23초×13.02회/(60분×0.70) = 7.13분 t2 = (0.30㎞/15㎞/hr+0.30㎞/20㎞/hr)×60분 = 2.10분 t3 = 0.80분 , t4 = 0.42분, t5 = 0.50분, t6 = 1.50분 Cmt = 7.13분+2.10분+0.80분+0.42분+0.50분+1.50분 = 12.45분 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 60분×11.72㎥×0.72×0.90/12.45분 = 36.60㎥/hr	[공통]8-2-5 로더 [공통]8-2-8 덤프트럭 [공통]8-2-1 불도저 [공통]8-2-3 굴착기 [공통]8-2-8 덤프트럭

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
a-2	가적치운반 (풍화암,ℓ = 300m)	㎥	1. 작업조건 - 터널개착식 굴착시 발생토는 갱구에서 운반거리 300m 가적치 후 되메우기를 가정하였으나 설계시 최적의 가적치장을 조사하여 시공시 설계변경을 최소화 하여야 한다. - 장비조합:로더,3.50㎥적재→D/T 15ton 2. 개착부되메우기(개착터널현장⇒가적치장) 1) 적재(타이어로더,3.50㎥) q1 = 3.50㎥, L = 1.30 , C = 1.00 f = 1.00/1.30 = 0.77 , Es = 0.50 , K = 0.70 t1 = 10초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 1.8초/m Cms = 1.8m×8m+9초+14초 = 37.4초 Q = (3600초×3.50㎥×0.70×0.77×0.50)/37.40초 = 90.79 ㎥/hr 2) 운반(덤프15ton+자동덮개15ton) T = 15ton , rt = 1.90ton/㎥ , E = 0.90 qt = 15ton/1.90ton/㎥×1.30 = 10.26㎥ N = 10.26㎥/(3.50㎥×0.70) = 4.19회 t1 = 37.40초×4.19회/(60분×0.50) = 5.22분 t2 = (0.30㎞/15㎞/hr+0.30㎞/20㎞/hr)×60분 = 2.10분 t3 = 0.80분 , t4 = 0.42분, t5 = 0.50분, t6 = 1.50분 Cmt = 5.22분+2.10분+0.80분+0.42분+0.50분+1.50분 = 10.54분 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 60분×10.26㎥×0.77×0.90/10.54분 = 40.48㎥/hr 3) 가적치장고르기(불도저(무한궤도) 32ton) D = 20m , L = 1.30 , C = 1.00 f = 1.00/1.30 = 0.77 E = (0.60+0.35)/2 = 0.48 , q0 = 5.50㎥ V1 = 70m/분(전진3단) , V2 = 78m/분(후진3단) e0 = 0.96(운반거리20m) , q1 = 5.50㎥×0.96 = 5.28㎥ Cm = 20m/70m/분+20m/78m/분+0.25분 = 0.79분 Q1 = (60분×5.28㎥×0.77×0.48)/0.79분 = 148.21 ㎥/hr Q = 148.21㎥/hr/(1/3(작업의 제한요소가 적으므로)) = 444.63㎥/hr 3. 개착부되메우기(가적치장⇒개착터널현장) 1) 깎기 및 적재(굴착기,1.00㎥) q1 = 1.00㎥ , L = 1.30 , f = 1.00/1.30 = 0.77 Es = (0.65+0.45)/2 = 0.55 , k = 0.70 Cms = 23초(180°선회) Q = (3600초×1.00㎥×0.70×0.77×0.48)/23초 = 40.50㎥/hr 2) 운반(덤프15ton+자동덮개15ton) T = 15ton , rt = 1.90ton/㎥ , E = 0.90 qt = 15ton/1.90ton/㎥×1.30 = 10.26㎥ N = 10.26㎥/(1.00㎥×0.70) = 14.66회 t1 = 23초×14.66회/(60분×0.55) = 10.22분 t2 = (0.30㎞/15㎞/hr+0.30㎞/20㎞/hr)×60분 = 2.10분 t3 = 0.80분 , t4 = 0.42분, t5 = 0.50분, t6 = 1.50분 Cmt = 10.22분+2.10분+0.80분+0.42분+0.50분+1.50분 = 15.54분 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 60분×10.26㎥×0.77×0.90/15.54분 = 27.45㎥/hr	[공통]8-2-5 로더 [공통]8-2-8 덤프트럭 [공통]8-2-1 불도저 [공통]8-2-3 굴착기 [공통]8-2-8 덤프트럭

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b	되메움토 내리기 (슈트)	㎥	1. 작업조건 1) 작업구간:30.0m 2) 슈트설치간격:10.0m 3) 사용횟수:20회 4) 슈트의 최하단 구조물 바닥에서:1.5m 5) 지표면에서 굴착면까지의 평균높이:24.0m 6) 평균높이 및 슈트길이:(24.0m-1.5m)/2 = 11.25m 7) 구조물상단 1.0m까지 되메움으로 계산: (24m×1m+30m×1m)1m = 54㎥ 2. 슈트 제작 1) 재료비(철판,t = 6㎜):2.29㎡ 수량산출: (2.29㎡×0.006m×7850㎏/㎥×1.10(할증))/20회/54㎥ = 0.11㎏/㎥ 2) 잡철물제작(간단):0.11㎏/㎥/1000㎏ = 0.00011ton/㎥ 3) 고재대:0.11㎏/㎥/1000㎏ = 0.00011ton/㎥ 4) 볼트&너트(M16×60㎜):2개×1.05(할증)/20회/54㎥=0.0019개/㎥ 3. 고압호스(D250㎜) ∴ 수량계산:24.00m-0.8m = 23.20m 수량산출:23.20m×1.05(할증)/20회/54㎥ = 0.023m/㎥	[건축]8-4-1 각종잡철물 제작설치
c	다 짐 공
c-1	상부노반다짐 (토사)	㎥	1. 작업조건 1) 토공 장비에 의한 포설, 다짐 작업을 포함한다. 2) 재료의 함수비 조절을 위한 살수작업을 포함한다. 3) 다짐도 95% 이상 4) 체적환산계수를 기 반영한 다짐상태의 토량을 적용한다. 5) 일당 시공량 Q = 770㎥/일 2. 인건비 1) 특별인부: 1인/일 / Q㎥/일 3. 중기사용료 1) 모터그레이더(일반용,3.6M): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 2) 진동롤러(자주식,10ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 3) 굴착기(0.6㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 4) 물탱크(살수차,16,000ℓ): 0.5대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일	[공통] 3-4-1 흙쌓기

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c-2	하부노반다짐 (토사)	㎥	1. 작업조건 1) 토공 장비에 의한 포설, 다짐 작업을 포함한다. 2) 재료의 함수비 조절을 위한 살수작업을 포함한다. 3) 다짐도 90% 이상 4) 체적환산계수를 기 반영한 다짐상태의 토량을 적용한다. 5) 일당 시공량 Q = 1,150㎥/일 2. 인건비 1) 특별인부: 1인/일 / Q㎥/일 3. 중기사용료 1) 모터그레이더(일반용,3.6M): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 2) 진동롤러(자주식,10ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 3) 굴착기(0.6㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 4) 물탱크(살수차,16,000ℓ): 0.5대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일	[공통] 3-4-1 흙쌓기
c-3	하부노반다짐 (풍화암)	㎥	1. 포설(모터그레이더 3.6m) I = 2.90m(Blade의 작업각도 60°일때) H = 0.50m, L = 1.30, C = 1.00, f = 1.00/1.30 = 0.77 N1= 4회, V1 = 6㎞/hr, V2 = 6.5㎞/hr t = 0.50분, E = 0.6, D = 50m Cm= 0.06×(50m/6㎞/hr+50m/6.5㎞/hr)+(2×0.50분) = 1.96분 Q = 60×2.90×50m×0.50m×0.60×0.77/(4회×1.96분) = 256.34㎥/hr 2. 다짐 1) 진동롤러(자주식 10 ton) V = 4㎞/hr , W = 1.90m , E = 0.60 f = 1.00 , N2 = 6회 , H = 0.50m Q = (1000×4㎞/hr×1.90m×0.50m×0.60×1.00)/6회 = 380㎥/hr 2) 타이어롤러(8 ∼ 15 ton) V = 2.5㎞/hr, W = 1.80m , E = 0.60 f = 1.00 , N3 = 4회 , H = 0.50m Q = (1000×2.5㎞/hr×1.80m×0.50m×0.60×1.00)/4회 = 337.5㎥/hr	[공통]8-2-7 모터그레이더 [공통]8-2-9 롤러

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			3. 살수(물탱크 5500ℓ) OMC = 13%(최적함수비) , NMC = 8%(자연함수비) q1 = 5500ℓ , E = 0.90 , L = 1.0㎞ rt = 1900㎏/㎥ , V = 15㎞/hr ∴ 살수량산정:13%-8% = 5 %(소요함수비) Ws = 1900㎏/㎥/(1+(13/100)) = 1681.42㎏/㎥ ∴ 소요물량산정:1681.42㎏×((13/100)-(8/100)) = 84.07ℓ/㎥ t1 = 5분(흡입준비) , t3 = 10분(흡입시간) t4 = 5분(살수대기) , t5 = 20분(살수시간) t2 = 1.0㎞/15㎞/hr×2×60분 = 8분 Cm = 5분+8.00분+10분+5분+20분 = 48분 Qw = 60분×5500ℓ×0.90/48.00분 = 6187.5ℓ/hr Q = 6187.50ℓ/hr/84.07ℓ/㎥ = 73.6㎥/hr	[공통]8-3-8 물탱크
c-4	터널개착부다짐	㎥	1. 부설(무한궤도굴착기, 1.00㎥) q1 = 1.00㎥, L = 1.25, C = 0.90, f = 0.90/1.25 = 0.72 k = 0.90, E = 0.60, Cm = 19초(90°선회) Q = (3600초×1.00㎥×0.90×0.72×0.60)/19초 = 73.67㎥/hr 2. 살수 보통인부 : 1인/일/8hr/일/73.67㎥/hr = 0.0017인/㎥ 3. 다짐(인력10%+기계90%) 1) 인력 보통인부 : 0.11인/㎥×10% = 0.011인/㎥ 2) 기계(진동롤러(핸드가이드식), 0.70ton) V = 1㎞/hr, W = 0.60m, E = 0.60 f = 1.00, N = 6회, H = 0.30m Q1 = (1,000×1㎞/hr×0.60m×0.30m×0.60×1.00)/6회 = 18㎥/hr Q = 18㎥/hr/90% = 20㎥/hr	[공통] 8-2-3 굴착기 [공통]8-2-9 진동롤러

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
1.07	사토처리
a	사토처리(토 사) (D/T=15ton, ℓ = 60m이상)	㎥	1. 적재(타이어로더,3.50㎥) q1 = 3.50㎥, L=1.25, f=1/1.25=0.80, Es=0.60, K=1.00 t1 = 9초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 1.8초/m Cms = 1.8m×8m+9초+14초 = 37.4초 Q = (3600초×3.50㎥×1.00×0.80×0.60)/37.40초 = 161.71㎥/hr 2. 운반(덤프15ton+자동덮개) T = 15ton , rt = 1.60ton/㎥ , E = 0.90 qt = 15ton/1.60ton/㎥×1.25 = 11.72㎥ N = 11.72㎥/(3.50㎥×1.00) = 3.35회 t1 = 37.40초×3.35회/(60분×0.60) = 3.48분 t2 = (0.01㎞/15+0.01㎞/20+0.05㎞/35㎞/hr×2)×60분 = 0.24분 t3 = 0.80분 , t4 = 0.42분, t5 = 0.50분, t6 = 1.50분 Cmt = 3.48분+0.24분+0.80분+0.42분+0.50분+1.50분 = 6.94분 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 60분×11.72㎥×0.80×0.90/6.94분 = 72.95㎥/hr ※ 도로 및 현장여건에 따라 덤프15톤 및 24톤 적용	[공통]8-2-5 로더 [공통]8-2-8 덤프트럭
b	토 사 (D/T=24ton, ℓ = 60m이상)	㎥	1. 적재(타이어로더,3.50㎥) q1 = 3.50㎥, L=1.25, f=1/1.25=0.80, Es=0.60, K=1.00 t1 = 9초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 1.8초/m Cms = 1.8m×8m+9초+14초 = 37.4초 Q = (3600초×3.50㎥×1.00×0.80×0.60)/37.40초 = 161.71㎥/hr 2. 운반(덤프24ton+자동덮개) T = 24ton , rt = 1.60ton/㎥ , E = 0.90 qt = 24ton/1.60ton/㎥×1.25 = 18.75㎥ N = 18.75㎥/(3.50㎥×1.00) = 5.36회 t1 = 37.40초×5.36회/(60분×0.60) = 5.57분 t2 = (0.01㎞/15+0.01㎞/20+0.05㎞/35㎞/hr×2)×60분 = 0.24분 t3 = 0.80분 , t4 = 0.42분, t5 = 0.50분, t6 = 1.50분 Cmt = 5.57분+0.24분+0.80분+0.42분+0.50분+1.50분 = 9.03분 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 60분×18.75㎥×0.80×0.90/9.03분 = 89.70㎥/hr ※ 도로 및 현장여건에 따라 덤프15톤 및 24톤 적용	[공통]8-2-5 로더 [공통]8-2-8 덤프트럭

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c	풍화암 (D/T=15ton, ℓ = 60m이상)	㎥	1. 적재(타이어로더,3.50㎥) q1 = 3.50㎥, L = 1.30, f = 1.00/1.30 = 0.77 Es = 0.50 , K = 0.70 t1 = 9초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 1.8초/m Cms = 1.8m×8m+9초+14초 = 37.4초 Q = (3600초×3.50㎥×0.70×0.77×0.50)/37.40초 = 90.79㎥/hr 2. 운반(덤프15ton+자동덮개) T = 15ton , rt = 1.90ton/㎥ , E = 0.90 qt = 15ton/1.90ton/㎥×1.30 = 10.26㎥ N = 10.26㎥/(3.50㎥×0.70) = 4.19회 t1 = 37.40초×4.19회/(60분×0.50) = 5.22분 t2 = (0.01㎞/15+0.01㎞/20+0.05㎞/35㎞/hr×2)×60분 = 0.24분 t3 = 0.80분 , t4 = 0.42분, t5 = 0.50분, t6 = 1.50분 Cmt = 5.22분+0.24분+0.80분+0.42분+0.50분+1.50분 = 8.68분 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 60분×10.26㎥×0.77×0.90/8.68분 = 49.15㎥/hr ※ 도로 및 현장여건에 따라 덤프15톤 및 24톤 적용	[공통]8-2-5 로더 [공통]8-2-8 덤프트럭
d	풍화암 (D/T=24ton, ℓ = 60m이상)	㎥	1. 적재(타이어로더,3.50㎥) q1 = 3.50㎥, L = 1.30, f = 1.00/1.30 = 0.77 Es = 0.50 , K = 0.70 t1 = 9초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 1.8초/m Cms = 1.8m×8m+9초+14초 = 37.4초 Q = (3600초×3.50㎥×0.70×0.77×0.50)/37.40초 = 90.79㎥/hr 2. 운반(덤프24ton+자동덮개) T = 24ton , rt = 1.90ton/㎥ , E = 0.90 qt = 24ton/1.90ton/㎥×1.30 = 16.42㎥ N = 16.42㎥/(3.50㎥×0.70) = 6.7회 t1 = 37.40초×6.7회/(60분×0.50) = 8.35분 t2 = (0.01㎞/15+0.01㎞/20+0.05㎞/35㎞/hr×2)×60분 = 0.24분 t3 = 0.80분 , t4 = 0.42분, t5 = 0.50분, t6 = 1.50분 Cmt = 8.35분+0.24분+0.80분+0.42분+0.50분+1.50분 = 11.81분 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 60분×16.42㎥×0.77×0.90/11.81분 = 57.81㎥/hr ※ 도로 및 현장여건에 따라 덤프15톤 및 24톤 적용	[공통]8-2-5 로더 [공통]8-2-8 덤프트럭

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
e	연암 (D/T=15ton, ℓ = 60m 이상)	㎥	1. 적재(타이어로더,3.50㎥) L = 1.40, f = 1.00/1.40 = 0.71 q1 = 1.72㎥, Es = 0.35 , K = 0.55 t1 = 9초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 1.8초/m Cms = 1.8m×8m+9초+14초 = 37.4초 Q = (3600초×3.50㎥×0.55×0.71×0.35)/37.40초 = 46.05㎥/hr 2. 운반(덤프15ton+자동덮개) T = 15ton , rt = 2.30ton/㎥ E = 0.90, qt = 15ton/2.30ton/㎥×1.40 = 9.13㎥ N = 9.13㎥/(3.50㎥×0.55) = 4.74회 t1 = 37.40초×4.74회/(60분×0.35) = 8.44분 t2 = (0.01㎞/15+0.01㎞/20+0.05㎞/35㎞/hr×2)×60분 = 0.24분 t3 = 0.80분 , t4 = 0.42분, t5 = 0.50분, t6 = 1.50분 Cmt = 8.44분+0.24분+0.80분+0.42분+0.50분+1.50분 = 11.90분 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 60분×9.13㎥×0.71×0.90/11.90분 = 29.42㎥/hr ※ 도로 및 현장여건에 따라 덤프15톤 및 24톤 적용	[공통]8-2-5 로더 [공통]8-2-8 덤프트럭
f	연암 (D/T=24ton, ℓ = 60m 이상)	㎥	1. 적재(타이어로더,3.50㎥) L = 1.40, f = 1.00/1.40 = 0.71 q1 = 3.5㎥, Es = 0.35 , K = 0.55 t1 = 9초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 1.8초/m Cms = 1.8m×8m+9초+14초 = 37.4초 Q = (3600초×3.50㎥×0.55×0.71×0.35)/37.40초 = 46.05㎥/hr 2. 운반(덤프24ton+자동덮개) T = 24ton , rt = 2.30ton/㎥ , E = 0.90 qt = 24ton/2.30ton/㎥×1.40 = 14.61㎥ N = 14.61㎥/(3.50㎥×0.55) = 7.59회 t1 = 37.40초×7.59회/(60분×0.35) = 13.52분 t2 = (0.01㎞/15+0.01㎞/20+0.05㎞/35㎞/hr×2)×60분 = 0.24분 t3 = 0.80분 , t4 = 0.42분, t5 = 0.50분, t6 = 1.50분 Cmt = 13.52분+0.24분+0.80분+0.42분+0.50분+1.50분 = 16.98분 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 60분×14.61㎥×0.71×0.90/16.98분 = 32.99㎥/hr ※ 도로 및 현장여건에 따라 덤프15톤 및 24톤 적용	[공통]8-2-5 로더 [공통]8-2-8 덤프트럭

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
g	경암 (D/T=15ton, ℓ = 60m이상)	㎥	1. 적재(타이어로더,3.50㎥) L = 1.85, f = 1.00/1.85 = 0.54 q1 = 3.50㎥, Es = 0.25 , K = 0.55 t1 = 9초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 1.8초/m Cms = 1.8m×8m+9초+14초 = 37.4초 Q = (3600초×3.50㎥×0.55×0.54×0.25)/37.40초 = 25.01㎥/hr 2. 운반(덤프15ton+자동덮개) T = 15ton , rt = 2.60ton/㎥ E = 0.90, qt = 15ton/2.60ton/㎥×1.85 = 10.67㎥ N = 10.67㎥/(3.50㎥×0.55) = 5.54회 t1 = 37.40초×5.54회/(60분×0.25) = 13.81분 t2 = (0.01㎞/15+0.01㎞/20+0.05㎞/35㎞/hr×2)×60분 = 0.24분 t3 = 0.80분 , t4 = 0.42분, t5 = 0.50분, t6 = 1.50분 Cmt = 13.81분+0.24분+0.80분+0.42분+0.50분+1.50분 = 17.27분 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 60분×10.67㎥×0.54×0.90/17.27분 = 18.02㎥/hr ※ 도로 및 현장여건에 따라 덤프15톤 및 24톤 적용	[공통]8-2-5 로더 [공통]8-2-8 덤프트럭
h	경암 (D/T=24ton, ℓ = 60m이상)	㎥	1. 적재(타이어로더,3.50㎥) L = 1.85, f = 1.00/1.85 = 0.54 q1 = 3.50㎥, Es = 0.25 , K = 0.55 t1 = 9초 , t2 = 14초 , lo = 8m , m = 1.8초/m Cms = 1.8m×8m+9초+14초 = 37.4초 Q = (3600초×3.50㎥×0.55×0.54×0.25)/37.40초 = 25.01㎥/hr 2. 운반(덤프24ton+자동덮개) T = 24ton , rt = 2.60ton/㎥ , E = 0.90 qt = 24ton/2.60ton/㎥×1.85 = 17.08㎥ N = 17.08㎥/(3.50㎥×0.55) = 8.87회 t1 = 37.40초×8.87회/(60분×0.25) = 22.12분 t2 = (0.01㎞/15+0.01㎞/20+0.05㎞/35㎞/hr×2)×60분 = 0.24분 t3 = 0.80분 , t4 = 0.42분, t5 = 0.50분, t6 = 1.50분 Cmt = 22.12분+0.24분+0.80분+0.42분+0.50분+1.50분 = 25.58분 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 60분×17.08㎥×0.54×0.90/25.58분 = 19.47㎥/hr ※ 도로 및 현장여건에 따라 덤프15톤 및 24톤 적용	[공통]8-2-5 로더 [공통]8-2-8 덤프트럭

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
i	사토장 고르기 (토사)	㎥	1. 적용 조건 - 사토장이 공유수면 매립지 또는 토석정보 시스템에 의한 타 공사현장 등 고르기가 흙을 공급받는 자 부담일 경우 적용하지 않는다. 2. 고르기(불도저32ton) D = 20m , L = 1.25 , f = 1.00/1.25 = 0.80 E = (0.70+0.60)/2 = 0.65 , q0 = 5.50㎥ V1 = 70m/분(전진3단) , V2 = 78m/분(후진3단) e0 = 0.96(운반거리20m), q1 = 5.50㎥×0.96 = 5.28㎥ Cm = 20m/70m/분+20m/78m/분+0.25분 = 0.79분 Q1 = (60분×5.28㎥×0.80×0.65)/0.79분 = 208.53㎥/hr Q = 208.53㎥/hr/(1/3(작업의 제한요소가 적으므로)) = 625.59㎥/hr	[공통]8-2-1 불도저
j	사토장 고르기 (풍화암)	㎥	1. 적용 조건 - 사토장이 공유수면 매립지 또는 토석정보 시스템에 의한 타 공사현장 등 고르기가 흙을 공급받는 자 부담일 경우 적용하지 않는다. 2. 고르기(불도저32ton) D = 20m , L = 1.30 , f = 1.00/1.30 = 0.77 E = (0.60+0.35)/2 = 0.48 , q0 = 5.50㎥ V1 = 70m/분(전진3단) , V2 = 78m/분(후진3단) e0 = 0.96(운반거리20m) , q1 = 5.50㎥×0.96 = 5.28㎥ Cm = 20m/70m/분+20m/78m/분+0.25분 = 0.79분 Q1 = (60분×5.28㎥×0.77×0.48)/0.79분 = 148.21㎥/hr Q = 148.21㎥/hr/(1/3(작업의 제한요소가 적으므로)) = 444.63㎥/hr	[공통]8-2-1 불도저
k	사토장 고르기 (연암)	㎥	1. 적용 조건 - 사토장이 공유수면 매립지 또는 토석정보 시스템에 의한 타 공사현장 등 고르기가 흙을 공급받는 자 부담일 경우 적용하지 않는다. 2. 고르기(불도저32ton) D = 20m , L = 1.40 f = 1.00/1.40 = 0.71 , E = 0.35 , q0 = 5.50㎥ V1 = 70m/분(전진3단) , V2 = 78m/분(후진3단) e0 = 0.96(운반거리20m) , q1 = 5.50㎥×0.96 = 5.28㎥ Cm = 20m/70m/분+20m/78m/분+0.25분 = 0.79분 Q1 = (60분×5.28㎥×0.71×0.35)/0.79분 = 99.65㎥/hr Q = 99.65㎥/hr/(1/3(작업의 제한요소가 적으므로)) = 298.95㎥/hr	[공통]8-2-1 불도저

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
l	사토장 고르기 (경암)	㎥	1. 적용 조건 - 사토장이 공유수면 매립지 또는 토석정보 시스템에 의한 타 공사현장 등 고르기가 흙을 공급받는 자 부담일 경우 적용하지 않는다. 2. 고르기(불도저32ton) D = 20m , L = 1.85 f = 1.00/1.85 = 0.54 , E = 0.25 , q0 = 5.50㎥ V1 = 70m/분(전진3단) , V2 = 78m/분(후진3단) e0 = 0.96(운반거리20m) , q1 = 5.50㎥×0.96 = 5.28㎥ Cm = 20m/70m/분+20m/78m/분+0.25분 = 0.79분 Q1 = (60분×5.28㎥×0.54×0.25)/0.79분 = 54.14㎥/hr Q = 54.14㎥/hr/(1/3(작업의 제한요소가 적으므로)) = 162.42㎥/hr	[공통]8-2-1 불도저
1.08	유공관부설
a	유공관설치 (HDPE,D250㎜)	m	1. 재료비 1) HDPE관,(D250㎜) : 1.05m 2) 조임밴드,(D250㎜) : 1개/6.0m = 0.167개/m 2. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 11개소/일 1) 배관공(수도) : 2인/일 / Q 개소/일 / 6m 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 개소/일 / 6m 3. 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 3%	[토목] 6-5-2 P.E관 밴드 접합 및 부설
b	부직포설치(300g/㎡)	㎡	1. 재 료 비 1) 부직포(300g/㎡):1.05㎡ 2) 잡재료비(재료비의 2%) 2. 설치비 1) 특별인부 : 0.07인/100㎡ = 0.0007인/㎡ 2) 보통인부 : 0.04인/100㎡ = 0.0004인/㎡ 3) 굴착기(0.40㎥) : 0.10hr/100㎡ = 0.001hr/㎡ 4) 공구손료 및 경장비(봉합기)의 기계경비:인력품의 4%	[공통]5-2-1 매트부설
c	배수뒷잡석채움 (소형장비)	㎥	1. 잡석구입 및 운반:1.04㎥(할증) 2. 작업조건 1) 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 구조물 뒤채움 기준이다. 2) 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다. 3) 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다. 4) 진동롤러(핸드가이드식) 기계경비 산정시 조정원은 계상하지 않는다. 5) 일당 시공량 Q = 110㎥/일 3. 인건비 1) 특별인부: 1인/일 / Q㎥/일 2) 보통인부: 1인/일 / Q㎥/일 4. 중기사용료 1) 굴착기(0.2㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 2) 진동롤러(핸드가이드식,0.7Ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 3) 살수차(5500ℓ): 0.5대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일	[공통] 3-4-4 뒤채움 및 다짐 (소형장비)

번호

공      종

단위

단 가 산 출 (예 시)

비  고

2

구 조 물 공

2.01

라멘공(집수정 및 환기구 포함)

a

콘크리트타설

a-1

바닥콘크리트

(무근,펌프차, 슬럼프15cm, Type-Ⅰ)

㎥

1. 적용범위

본 품은 콘크리트펌프차(80㎥/hr이상)를 활용한 콘크리트 타

설에 적용하며 나머지 조건은 건설표준품셈을 참고하여 슬럼

프치, 시설유형 및 현장조건에 따라 조정한다.

2. 일일시공량

(일당)

슬럼프	기준 시공량(㎥)
	무근구조물	철근구조물
8~12cm	130	125
15cm	135	130
18cm이상	145	140

가. 시공량(㎥) : 기준시공량 × f1(시설유형) × f2(현장조건)

※ 펌프차의 타설범위(타설높이 및 수평거리)를 초과하여

펌프차 이동 및 재셋팅이 필요한 경우 회당 시공량의

5%을 감하여 적용한다.

나. 시설유형(f1)

유형	Type-Ⅰ	Type-Ⅱ	Type-Ⅲ	Type-Ⅳ
f1	1.4	1.0	0.8	0.3

다. 현장조건(f2)

유형	조건-1	조건-2	조건-3
f2	1.2	1.0	0.8

∴ Q(시공량)= 135㎥/일 × 1.4(f1) × 1.0(f2) = 189.0㎥/일

3. 인력 및 장비 편성

1) 노무비

가. 콘크리트공 : (3인/일-1인<진동기제외>) / Q㎥/일

나. 특별인부 : (1인/일-1인<진동기제외>) / Q㎥/일

다. 보통인부 : 1인/일 / Q㎥/일

라. 형틀목공 : 1인/일 / Q㎥/일

* 본 편성인력은 콘크리트 진동기 사용 기준으로

진동기를 사용하지 않는 경우 콘크리트공과 특별

인부를 각 1인 제외한다.

* 콘크리트 타설작업 시 거푸집 및 동바리의 변형·변위 침하 발생에 따른 거푸집 작업 등 별도 인력이 필요하다고 판단되는 경우 형틀목공을 추가 계상한다.

2) 콘크리트펌프차(80㎥이상)

: 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

3) 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의

기계경비는 : 노무비의 5%

4) 타설 후 발생하는 잔여 콘크리트(배관 내 잔여물 등)의 재료비는 : 노무비의 5%

4. 양생비(무근)

1) 특별인부:0.22인/10㎥=0.022인

2) 제잡비(양생손료,기구손료):인력품의 31%

[공통] 6-1-4   콘크리트

펌프차타설

2025년건설

표준품셈     6-1 콘크리트 및 2016년건설

표준품셈

6-1-2-2

양생비

번호

공      종

단위

단 가 산 출 (예 시)

비  고

a-2

구체콘크리트

(철근,펌프차,

슬럼프15cm, Type-Ⅱ)

㎥

1. 적용범위

본 품은 콘크리트펌프차(80㎥/hr이상)를 활용한 콘크리트 타설

에 적용하며 나머지 조건은 건설표준품셈을 참고하여 슬럼프     치, 시설유형 및 현장조건에 따라 조정한다.

2. 일일시공량

(일당)

슬럼프	기준 시공량(㎥)
	무근구조물	철근구조물
8~12cm	130	125
15cm	135	130
18cm이상	145	140

가. 시공량(㎥) : 기준시공량 × f1(시설유형) × f2(현장조건)

※ 펌프차의 타설범위(타설높이 및 수평거리)를 초과하여

펌프차 이동 및 재셋팅이 필요한 경우 회당 시공량의

5%을 감하여 적용한다.

나. 시설유형(f1)

유형	Type-Ⅰ	Type-Ⅱ	Type-Ⅲ	Type-Ⅳ
f1	1.4	1.0	0.8	0.3

다. 현장조건(f2)

유형	조건-1	조건-2	조건-3
f2	1.2	1.0	0.8

∴ Q(시공량)= 130㎥/일 × 1.0(f1) × 1.0(f2) = 130.0㎥/일

3. 인력 및 장비 편성

1) 노무비

가. 콘크리트공 : 4인/일 / Q㎥/일

나. 특별인부 : 1인/일 / Q㎥/일

다. 보통인부 : 1인/일 / Q㎥/일

라. 형틀목공 : 1인/일 / Q㎥/일

* 본 편성인력은 콘크리트 진동기 사용 기준으로

진동기를 사용하지 않는 경우 콘크리트공과 특별

인부를 각 1인 제외한다.

* 콘크리트 타설작업 시 거푸집 및 동바리의 변형·변위 침하 발생에 따른 거푸집 작업 등 별도 인력이 필요하다고 판단되는 경우 형틀목공을 추가 계상한다.

2) 콘크리트펌프차(80㎥이상)

: 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

3) 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의 기계경비는

: 노무비의 5%

4) 타설 후 발생하는 잔여 콘크리트(배관 내 잔여물 등)의 재료비는 : 노무비의 5%

4. 양생비(철근)

1) 특별인부:0.07인/10㎥=0.007인

2) 제잡비(양생손료,기구손료):인력품의 41%

[공통] 6-1-4   콘크리트

펌프차타설

2025년건설

표준품셈     6-1 콘크리트 및 2016년건설

표준품셈     6-1-2-2 양생비

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b	거푸집
b-1	합판거푸집 (6회,H = 0～7m)	㎡	1. 합판거푸집(H = 0∼7m이하) 1) 재 료 비 - 합판(12㎜):1.030㎡×32.7/100 - 각재:0.038㎥×32.7/100 - 소모자재(박리재 등):주자재비의 11%적용 2) 설치 및 해체(6회,간단) ∴ Q(시공량) = 50㎡/일 ① 형틀목공: 5인/일 / Q㎡/일 ② 보통인부: 2인/일 / Q㎡/일 ③ 공구손료 및 경장비 기계경비:인력품의 1% ※ 참조 - 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.	[공통] 6-3-1 합판거푸집 설치 및 해체
b-2	합판거푸집 (4회,H = 0～7m)	㎡	1. 합판거푸집(H = 0∼7m이하) 1) 재 료 비 - 합판(12㎜):1.030㎡×38.0/100 - 각재:0.038㎥×38.0/100 - 소모자재(박리재 등):주자재비의 9%적용 2) 설치 및 해체(4회,보통) ∴ Q(시공량) = 45㎡/일 ① 형틀목공: 5인/일 / Q㎡/일 ② 보통인부: 2인/일 / Q㎡/일 ③ 공구손료 및 경장비 기계경비:인력품의 1% ※ 참조 - 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.	[공통] 6-3-1 합판거푸집 설치 및 해체
b-3	합판거푸집 (3회,H = 0～7m)	㎡	1. 합판거푸집(H = 0∼7m이하) 1) 재 료 비 - 합판(12㎜):1.030㎡×44.3/100 - 각재:0.038㎥×44.3/100 - 소모자재(박리재 등):주자재비의 8%적용 2) 설치 및 해체(3회,복잡) ∴ Q(시공량) = 30㎡/일 ① 형틀목공: 5인/일 / Q㎡/일 ② 보통인부: 2인/일 / Q㎡/일 ③ 공구손료 및 경장비 기계경비:인력품의 1% ※ 참조 - 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.	[공통] 6-3-1 합판거푸집 설치 및 해체

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b-4	목재거푸집 (3회,H = 0～7m)	㎡	1. 목재거푸집(1회,H = 0∼7m이하) 1) 재 료 비 - 육 송(판재):0.030㎡ - 육 송(각재):0.038㎥ - 사용고재(판재+각재):-23% - 철선(#8-4.0㎜):0.29㎏ - 철 못(N75):0.25㎏ - 박리제(중유):0.19ℓ 2) 제작설치 및 해체 - 형틀목공:0.34인 - 보통인부:0.27인 2. 목재거푸집(H = 0∼7m이하) 1) 재료비:목재 1회 사용재료비의 46.6% 적용 2) 노무비:목재 1회 사용노무비의 51.6% 적용	2016년 건설표준품셈 6-3-1 목재거푸집
b-5	원형거푸집 (3회,H = 0～7m)	㎡	1. 원형거푸집(1회,H = 0∼7m이하) 1) 재 료 비 - 육 송(판재):0.050㎡ - 육 송(각재):0.053㎥ - 보통합판(3㎜):1.030㎡ - 사용고재(판재+각재):-23% - 철선(#8-4.0㎜):0.29㎏ - 철 못(N75):0.25㎏ - 박리제(중유):0.19ℓ 2) 제작설치 및 해체 - 형틀목공:0.54인 - 보통인부:0.25인 2. 원형거푸집(H = 10∼13m이하) 1) 재료비(2회,H = 0∼7m):100% 적용 2) 노무비(2회,H = 0∼7m):120% 적용	2016년 건설표준품셈 6-3-3 원형거푸집
b-6	문양거푸집(판넬)	㎡	1. 거푸집설치(합판, 유로폼 등)는 별도 계상한다. 2. 재 료 비(1회사용) 1) 문양거푸집: 1.0㎡ 2) 잡재료 및 소모재료비(고정못 등): 주재료비의 2% 3. 설치 및 해체 - 형틀목공 : 0.07인 - 보통인부 : 0.03인	[공통] 6-3-4 문양거푸집

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b-7	유로폼 (벽체, 보통, H = 0～7m)	㎡	1. 유로폼(H = 0∼7m이하) 1) 재 료 비 - 패널(600×1200㎜):0.89매/10㎡ - 내부패널((200+200)×1200㎜):0.03매/10㎡ - 부자재(웨지핀, 플랫타이, 강관파이프, 후크) : 주자재비의 52% - 소모재료(박리재 등) : 주자재비의 5% 2) 설치 및 해체(보통) ∴ Q(시공량) = 35㎡/일 ① 형틀목공: 4인/일 / Q㎡/일 ② 보통인부: 1인/일 / Q㎡/일 ③ 공구손료 및 경장비 기계경비:인력품의 3% ※ 참조 - 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.	[공통] 6-3-3 유로폼 설치 및 해체
c	구조물비계
c-1	강관비계 (3개월,H=10m이하)	㎡	1. 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단) 설치 및 해체 작업이 포함되어 있다. 2. 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율 적용 3. 설치 및 해체 1) 비 계 공:0.05인 2) 보통인부:0.02인 3) 공구손료 및 경장비(전동드릴 등):인력품의 2%	[공통] 2-7-1 강관비계
c-2	강관비계 (3개월,H=10m초과～20m이하)	㎡	1. 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단) 설치 및 해체 작업이 포함되어 있다. 2. 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율 적용 3. 설치 및 해체 1) 비 계 공:0.06인 2) 보통인부:0.02인 3) 공구손료 및 경장비(전동드릴 등):인력품의 2%	[공통] 2-7-1 강관비계

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c-3	강관비계 (3개월,H=20m초과～30m이하)	㎡	1. 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단) 설치 및 해체 작업이 포함되어 있다. 2. 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율 적용 3. 설치 및 해체 1) 비 계 공:0.07인 2) 보통인부:0.02인 3) 공구손료 및 경장비(전동드릴 등):인력품의 2%	[공통] 2-7-1 강관비계
d	시스템비계
d-1	시스템비계 (3개월, H = 10m이하)	㎡	1. 적용기준 1) 본 품은 비계(발판 및 내부계단 포함)설치, 해체 작업이 포함되어 있다. 2) 현장여건에 따라 장비(크레인 등)가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다. 2. 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율 적용 3. 설치 및 해체 1) 비 계 공 : 0.04인 2) 보통인부 : 0.01인	[공통] 2-7-2 시스템비계
d-2	시스템비계 (3개월, H = 10m초과∼20m이하)	㎡	1. 적용기준 1) 본 품은 비계(발판 및 내부계단 포함)설치, 해체 작업이 포함되어 있다. 2) 현장여건에 따라 장비(크레인 등)가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다. 2. 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율 적용 3. 설치 및 해체 1) 비 계 공 : 0.05인 2) 보통인부 : 0.01인	[공통] 2-7-2 시스템비계
d-3	시스템비계 (3개월, H = 20m초과∼30m이하)	㎡	1. 적용기준 1) 본 품은 비계(발판 및 내부계단 포함)설치, 해체 작업이 포함되어 있다. 2) 현장여건에 따라 장비(크레인 등)가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다. 2. 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통]2-2-5 공기에 대한 손율 적용 3. 설치 및 해체 1) 비 계 공 : 0.06인 2) 보통인부 : 0.01인	[공통] 2-7-2 시스템비계
e	가설계단
e-1	경사형 (3개월, H =6m이하)	㎡	1. 본 품은 6m이하에서 강관(Φ48.6mm), 조립형 발판을 사용하여 가설계단을 경사형태로 조립·설치 하는 기준이고, 가설계단의 폭은 0.9m이하를 기준으로, 비계 및 발판 설치·해체 작업이 포함 되어 있다. 2. 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통]2-2-5 공기에 대한 손율 적용	[공통] 2-7-5 경사형 가설 계단

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			3. 설치 및 해체 1) 비 계 공 : 0.27인 2) 보통인부 : 0.09인 3) 공구손료 및 경장비(전동드릴 등) : 인력품의 2%
e-2	타워형 (3개월)	㎡	1. 본 품은 일체형 발판을 사용하여 가설계단을 타워형태로 설치하는 기준이며, 가설계단의 폭은 0.9m이하를 기준 으로, 비계 및 발판 설치·해체 작업이 포함 되어 있다. 2. 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율 적용 3. 설치 및 해체 1) 비 계 공 : 0.20인 2) 보통인부 : 0.07인 3) 크레인(10ton) : 0.06hr	[공통] 2-7-6 타워형 가설 계단
f	강관동바리
f-1	강관동바리 (3개월,H=2.5m이하)	공/㎥	1. 강관동바리(설치간격0.6m초과~0.8m이하) 1) 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 - 잡재료 및 소모재료(고정못 등) : 주재료비의 5% 2) 설치 및 해체 - 형틀목공 : 0.54인/10(공/㎥) = 0.054인/공/㎥ - 보통인부 : 0.21인/10(공/㎥) = 0.021인/공/㎥	[공통] 2-6-1 강관동바리 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율
			2. 강관동바리(설치간격0.6m이하) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 120%적용
			3. 강관동바리(설치간격0.8m초과) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 90%적용
f-2	강관동바리 (3개월, H=2.5m초과∼3.5m이하)	공/㎥	1. 강관동바리(설치간격0.6m초과~0.8m이하) 1) 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 - 잡재료 및 소모재료(고정못 등) : 주재료비의 5% 2) 설치 및 해체 - 형틀목공 : 0.58인/10(공/㎥) = 0.058인/공/㎥ - 보통인부 : 0.23인/10(공/㎥) = 0.023인/공/㎥	[공통] 2-6-1 강관동바리 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율
			2. 강관동바리(설치간격0.6m이하) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 120%적용
			3. 강관동바리(설치간격0.8m초과) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 90%적용

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
f-3	강관동바리 (3개월, H=3.5m초과∼4.2m이하)	공/㎥	1. 강관동바리(설치간격0.6m초과~0.8m이하) 1) 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 - 잡재료 및 소모재료(고정못 등) : 주재료비의 5% 2) 설치 및 해체 - 형틀목공 : 0.63인/10(공/㎥) = 0.063인/공/㎥ - 보통인부 : 0.25인/10(공/㎥) = 0.025인/공/㎥	[공통] 2-6-1 강관동바리 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율
			2. 강관동바리(설치간격0.6m이하) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 120%적용
			3. 강관동바리(설치간격0.8m초과) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 90%적용
g	시스템동바리
g-1	시스템동바리 (3개월, H = 10m이하)	공/㎥	1. 시스템동바리(설치간격0.6m초과~1.2m이하) 1) 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 설치 및 해체 - 형틀목공: 0.58/10(공/㎥) = 0.058인/공/㎥ - 보통인부: 0.18/10(공/㎥) = 0.018인/공/㎥ 3) 기계경비 - 크레인(15ton): 0.17hr/10(공/㎥)=0.017hr/공/㎥	[공통] 2-6-3 시스템동바리 [공통]2-2-5 공기에 대한 손율
			2. 시스템동바리(설치간격0.6m이하) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 120%적용 3) 기계경비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 120%적용
			3. 시스템동바리(설치간격1.2m초과) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 90%적용 3) 기계경비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 90%적용
g-2	시스템동바리 (3개월, H=10m초과∼20m이하)	공/㎥	1. 시스템동바리(설치간격0.6m초과~1.2m이하) 1) 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 설치 및 해체 - 형틀목공: 0.68/10(공/㎥) = 0.068인/공/㎥ - 보통인부: 0.21/10(공/㎥) = 0.021인/공/㎥ 3) 기계경비 - 크레인(15ton): 0.25hr/10(공/㎥)=0.025hr/공/㎥	[공통] 2-6-3 시스템동바리 [공통]2-2-5 공기에 대한 손율
			2. 시스템동바리(설치간격0.6m이하) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 120%적용 3) 기계경비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 120%적용
			3. 시스템동바리(설치간격1.2m초과) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 90%적용 3) 기계경비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 90%적용

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
g-3	시스템동바리 (3개월, H=20m초과∼30m이하)	공/㎥	1. 시스템동바리(설치간격0.6m초과~1.2m이하) 1) 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 설치 및 해체 - 형틀목공: 0.87/10(공/㎥) = 0.087인/공/㎥ - 보통인부: 0.27/10(공/㎥) = 0.027인/공/㎥ 3) 기계경비 - 크레인(20ton): 0.28hr/10(공/㎥)=0.028hr/공/㎥	[공통] 2-6-3 시스템동바리 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율
			2. 시스템동바리(설치간격0.6m이하) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 120%적용 3) 기계경비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 120%적용
			3. 시스템동바리(설치간격1.2m초과) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 90%적용 3) 기계경비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 90%적용
h	수평연결재(3개월)	㎡	1. 수평연결재(설치간격0.6m초과~0.8m이하) 1) 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율 적용 2) 설치 및 해체(1단 설치일 때) - 형틀목공: 0.02인 - 보통인부: 0.01인	[공통] 2-6-1 강관동바리
			2. 수평연결재(설치간격0.6m이하) 1) 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 120%적용
			3. 수평연결재(설치간격0.8m초과) 1) 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 90%적용
i	시공이음면정리	㎡	1. 노무비 1) 특별인부:0.12인 2) 보통인부:0.12인 2. 공구손료 및 경장비(소형브레이커, 치핑기 등)의 기계경비 (인력품의 8%)	[공통]6-1-12 콘크리트 치핑
j	버팀목 설치 (D200×600㎜)	개소	1. 재료비(육송,원목):0.019㎥ 2. 설치비 1) 동 발 공:0.030인 2) 보통인부:0.070인	참고자료

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
k	매입전 설치 (2개 1조)	조	1. 재료비(C - 첸넬):1조 2. 설치비 1) 배전전공:0.217인 2) 보통인부:0.002인 3) 용 접 공:0.0045인	참고자료
l	인서트 설치(D9㎜)	㎡	1. 재료비 1) 인서트(9㎜):1.362개 2) 못(N75):0.01㎏ 2. 설치비(형틀목공):0.004인	참고자료
m	열차대피안전손잡이 (스텐레스)	개소	1. 재료비 1) 손잡이(스텐레스):1개 2) 너트 및 와샤(D8㎜):2개 2. 스트롱앙카 설치 1) 재료비(D9×50㎜):1.05(할증)×2개 = 2.10개 2) 설치비(철골공):0.07인×2개 = 0.14인
n	중앙말뚝방수 (스텐레스)	개소	1. 재 료 비 1) 스텐레스(각종):10.375㎏ 2) 고재대:10.375㎏ 2. 강판수동절단(T = 14㎜):0.727m 3. 강판수동절단(T = 6㎜):2.050m 4. 강판전기용접(필렛용접,T = 6㎜,하향):2.872m 5. 수팽창지수제(30×30㎜) 1) 지수제(30×30㎜):1.20m 2) 설치비(방수공):0.08인×1.20m = 0.096인
o	스페이서설치
o-1	스페이서설치(벽체)	㎡	1. 재료비:벽체형 8개 2. 설치비(재료비의 5%)
o-2	스페이서설치 (슬래브 및 기초)	㎡	1. 재료비:슬래브형 4개 2. 설치비(재료비의 5%)
p	철근현장가공조립
p-1	철근현장가공조립 (Type-Ⅱ-1)	ton	1. 현장가공 ∴ Q(시공량) = 4.0ton/일 1) 철 근 공: 3인/일 / Qton/일 2) 보통인부: 1인/일 / Qton/일 3) 공구손료 및 경장비(철근 가공기 등)의 기계경비 : 인력품의 9% 2. 현장조립 ∴ Q(시공량) = 2.5ton/일 1) 철 근 공: 5인/일 / Qton/일 2) 보통인부: 2인/일 / Qton/일 3) 공구손료 및 경장비의 기계경비 : 인력품의 2% 4) 결속선(#20 0.9㎜):8.00㎏ ※ 참조 - 개소별 소량(0.5ton미만)의 시공 위치가 산재하는 경우 시공량의 50%까지 감하여 적용한다. - 현장여건(고소작업, 철근 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다.	[공통] 6-2-2 현장가공 [공통] 6-2-3 현장조립

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
2.02	배 수 시 설
a	배수로뚜껑제작설치 (350×290×80㎜)	개	1. 수량산출 1) 강재 거푸집:0.35m×0.29m+0.35m×0.08m×2개+0.29m ×0.08m×2개 = 0.204㎡/개 2) 콘 크 리 트:0.35m×0.29m×0.08m = 0.008㎥/개 3) 와이어메쉬(#4×100×100):0.051㎡/개 2. 콘크리트 1) 레미콘(fck=24Mpa):0.008㎥/개 2) 콘크리트타설(소형,철근,인력운반타설,진동기제외) ∴ 시공량 : Q = 20㎥/일×50% = 10.0㎥/일 ① 콘크리트공:3인/일/Q㎥/일×0.008㎥/개 ② 보통 인부:3인/일/Q㎥/일×0.008㎥/개 3. 강재거푸집(간단,55회 적용) 1) 제 작 비 ∴ 강판중량:(0.35m×0.08m×0.0032m)×2개×7850㎏/㎥ = 1.407㎏/개 ∴ 강판중량:(0.29m×0.08m×0.0032m)×2개×7850㎏/㎥ = 1.166㎏/개 ∴ 강판중량:(0.35m×0.29m×0.0032m)×1개×7850㎏/㎥ = 2.550㎏/개 계:1.407㎏+1.166㎏+2.550㎏ = 5.123㎏/개 ∴ 할증수량:(1.407㎏+1.166㎏+2.550㎏)×1.10(할증) = 5.635㎏/개 ① 강판(t = 3.2㎜):5.635㎏/55회 = 0.102㎏/개 ② 고재처리:(5.635㎏/개-5.123㎏/개)/55회 = 0.009㎏/개 ③ 강판운반(각종):5.635㎏/개/55회 = 0.102㎏/개 ④ 잡철물제작(간단):5.123㎏/개/55회 = 0.093kg/개 ⑤ 박리제(중유):0.15ℓ/55회 = 0.0027ℓ/개 2) 거푸집 해체 ① 형틀목공:0.017인/㎡×0.204㎡/개 = 0.0035인/개 ② 보통인부:0.045인/㎡×0.204㎡/개 = 0.0092인/개 4. 설치비(보도형 블록 설치(대형), B-TYPE 적용) - 개당면적:0.35m×0.29m = 0.102㎡/개 1) 포 장 공:2인/일/120㎡/일×0.102㎡/개 2) 특별인부:1인/일/120㎡/일×0.102㎡/개 3) 보통인부:1인/일/120㎡/일×0.102㎡/개 5. 와이어메쉬설치(#4×100×100) 1) 재료비 - 와이어메쉬(#4×100×100):0.051㎡/개×1.03 = 0.053㎡/개 - 잡재료 및 소모재료(주재료비의 3%) 2) 설치비 - 특별인부:0.006인/㎡×0.051㎡/개 = 0.00031인/개	[공통] 6-1-1 콘크리트타설 [공통] 6-3-2 강재거푸집 [토목] 1-7-2 보도용 블록 설치(대형) [건축] 8-1-3 와이어메쉬 바닥깔기

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			6. 운반비(제작장 ⇒ 현장) 1) 적재 및 적하 ∴ 개당중량:0.35m×0.29m×0.08m×2350㎏/㎥ = 19.08㎏/개 - 적재톤수:8000㎏/대(덤프트럭 적재중량) - 적재중량:19.08㎏/개×40개/묶음 = 763.20kg - 적재횟수:8000㎏/대/763.20㎏/묶음 = 10묶음/대 ① 적 재 : 1분/회×10묶음/대 = 10분/대 ② 적 하 : 1분/회×10묶음/대 = 10분/대 계: 10.00분/대+10.00분/대 = 20분/대 2) 운반비 D = 0.433㎞(별도계산) q1 = (40개/묶음×10묶음/대) = 400개/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 20.00분/대(적재), t3 = 20.00분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (0.433㎞/15㎞/hr(적재)+0.433㎞/20㎞/hr(공차)×60분 = 3.03분/대 Cm = 20.00분+3.03분+20.00분+0.42분+1.50분 = 44.95분/대 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 44.95분/대/(60분×1.00×0.90)/400.00개/대 = 0.002hr/개 3) 중기사용료 q1 = 40개/묶음 t1 = 1분(적재소요시간), t2 = 1분(적하소요시간) V1 = 10㎞/hr(적재시속도), V2 = 10㎞/hr(공차시속도) L = 0.02㎞(1회운반거리), f = 1.00, E = 1.00 Cm = (0.02㎞/10㎞/hr+0.02㎞/10㎞/hr)×60분+(1분+1분) = 2.24분 Q = 2.24분/대/(60분×1.00×1.00)/40개/묶음 = 0.001hr/개 4) 인건비(트럭위1인+트럭아래1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.001hr/개 = 0.00025인/개	[공통]8-2-8 덤프트럭
b	공동구뚜껑제작설치 (480×350×80㎜)	개	1. 수량산출 1) 강재 거푸집:0.48m×0.35m+0.48m×0.08m×2개+0.35m ×0.08m×2개 = 0.301㎡/개 2) 콘 크 리 트:0.48m×0.35m×0.08m = 0.013㎥/개 3) 와이어메쉬(#4×100×100):0.104㎡/개 2. 콘크리트 1) 레미콘(fck=24Mpa):0.013㎥/개 2) 콘크리트타설(소형,철근,인력운반타설,진동기제외) ∴ 시공량 : Q = 20㎥/일×50% = 10.0㎥/일 ① 콘크리트공:3인/일/Q㎥/일×0.013㎥/개 ② 보통 인부:3인/일/Q㎥/일×0.013㎥/개 3. 강재거푸집(간단,55회 적용) 1) 제 작 비 ∴ 강판중량:(0.48m×0.08m×0.0032m)×2개×7850㎏/㎥ = 1.929㎏/개 ∴ 강판중량:(0.35m×0.08m×0.0032m)×2개×7850㎏/㎥ = 1.407㎏/개 ∴ 강판중량:(0.48m×0.35m×0.0032m)×1개×7850㎏/㎥ = 4.220㎏/개	[공통] 6-1-1 콘크리트타설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			계:1.929㎏+1.407㎏+4.220㎏ = 7.556㎏/개 ∴ 할증수량:(1.929㎏+1.407㎏+4.220㎏)×1.10(할증) = 8.312㎏/개 ① 강판(t = 3.2㎜):8.312㎏/55회 = 0.151㎏/개 ② 고재처리:(8.312㎏/개-7.556㎏/개)/55회 = 0.014㎏/개 ③ 강판운반:8.312㎏/개/55회 = 0.151㎏/개 ④ 잡철물제작(간단):7.556㎏/개/55회 = 0.137kg/개 ⑤ 박리제(중유):0.15ℓ/55회 = 0.0027ℓ/개 2) 거푸집 해체 ① 형틀목공:0.017인/㎡×0.301㎡/개 = 0.0051인/개 ② 보통인부:0.045인/㎡×0.301㎡/개 = 0.0135인/개 4. 설치비(보도형 블록 설치(대형), B-TYPE 적용) - 개당면적:0.48m×0.35m = 0.168㎡/개 1) 포 장 공:2인/일/120㎡/일×0.168㎡/개 2) 특별인부:1인/일/120㎡/일×0.168㎡/개 3) 보통인부:1인/일/120㎡/일×0.168㎡/개 5. 와이어메쉬설치(#4×100×100) 1) 재료비 - 와이어메쉬(#4×100×100):0.104㎡/개×1.03 = 0.107㎡/개 - 잡재료 및 소모재료(주재료비의 3%) 2) 설치비 - 특별인부:0.006인/㎡×0.104㎡/개 = 0.00062인/개 6. 운반비(제작장 ⇒ 현장) 1) 적재 및 적하 ∴ 개당중량:0.48m×0.35m×0.08m×2350㎏/㎥ = 31.58㎏/개 - 적재톤수:8000㎏/대(덤프트럭 적재중량) - 적재중량:31.58㎏/개×40개/묶음 = 1263.20㎏ - 적재횟수:8000㎏/대/1263.20㎏/묶음 = 6묶음/대 ① 적 재 : 1분/회×6묶음/대 = 6분/대 ② 적 하 : 1분/회×6묶음/대 = 6분/대 계: 6.00분/대+6.00분/대 = 12분/대 2) 운반비 D = 0.433㎞(별도계산) q1 = (40개/묶음×6묶음/대) = 240개/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 6.00분/대(적재), t3 = 6.00분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (0.433㎞/15㎞/hr(적재)+0.433㎞/20㎞/hr(공차)×60분 = 3.03분/대 Cm = 6.00분/대+3.03분/대+6.00분/대+0.42분/대+1.50분/대 = 16.95분/대 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 16.95분/대/(60분×1.00×0.90)/240.00개/대 = 0.001hr/개 3) 중기사용료 q1 = 40개/묶음 t1 = 1분(적재소요시간), t2 = 1분(적하소요시간) V1 = 10㎞/hr(적재시속도), V2 = 10㎞/hr(공차시속도) L = 0.02㎞(1회운반거리), f = 1.00, E = 1.00 Cm = (0.02㎞/10㎞/hr+0.02㎞/10㎞/hr)×60분+(1분+1분) = 2.24분 Q = 2.24분/대/(60분×1.00×1.00)/40개/묶음 = 0.001hr/개 4) 인건비(트럭위1인+트럭아래1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.001hr/개 = 0.00025인/개	[공통] 6-3-2 강재거푸집 [토목] 1-7-2 보도용 블록 설치(대형) [건축] 8-1-3 와이어메쉬 바닥깔기 [공통]8-2-8 덤프트럭

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c	배수공설치(PVC pipe,D100㎜)	m	1. 재료비(VG1,D100㎜) : 1.05m 2. 설치비(재료비의 5%)
2.03	신축이음
a	시공이음채움 (Hard Form)	㎡	1. 재료비 1) 신축이음재(Rubber,30T,1m×1m):1.05㎡ 2) 콘크리트못(ℓ = 25㎜):6개 3) 와샤(D20㎜):6개 2. 설치비(보통인부):0.030인	[건축]6-6-1 수밀코킹
b	수팽창지수재설치 (30×30㎜)	m	1. 재료비 1) 지수재(30×30㎜):1.04m 2. 설치비 1) 재료비의 5%	2016년도 국도건설공사 설계실무요령 4. 구조물공
c	지수판설치 (300×9t)	m	1. 재료비 1) PVC 지수판(300×9):1.04m 2) PVC 용접봉:0.042㎏ 3) 철 선(#8):0.210㎏ 2. 설 치 비 1) 특별인부:0.151인 2) 보통인부:0.116인 3) 공구손료 및 경장비(PVC 용접기 등)의 기계경비 : 인력품의 3%	[공통]6-3-91.PVC 용접
3.	방 수 공
3.01	방수보호 모르타르 설치
a	상부보호모르타르 (1 : 3,T = 50㎜)	㎡	1. 모르타르배합(1:3) : 1㎥×0.05 = 0.05㎥ 2. 모르타르바름(3.6m이하, 2회기준) ∴ 일당 시공량 Q = 29㎡/일 1) 미 장 공:2인/일 / Q ㎡/일 2) 보통인부:1인/일 / Q ㎡/일 3) 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비 (인력품의 2%적용)	[건축] 9-1-1 모르타르 배합 [건축] 9-1-2 모르타르 바름
b	벽체보호모르타르 (1 : 3,T = 5㎜)	㎡	1. 모르타르배합(1:3) : 1㎥×0.005 = 0.005㎥ 2. 모르타르바름(3.6m이하, 1회기준) ∴ 일당 시공량 Q = 40㎡/일 1) 미 장 공:2인/일 / Q ㎡/일 2) 보통인부:1인/일 / Q ㎡/일 3) 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비 (인력품의 2%적용)	[건축] 9-1-1 모르타르 배합 [건축] 9-1-2 모르타르 바름

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c	하부보호모르타르 (1 : 3,T = 30㎜)	㎡	1. 작업조건 1) 본 품은 모르타르 타설장비를 이용한 바닥 모르타르 타설 기준이다. 2) 준비작업(바탕청소, 보양 등), 압송관 조립 및 철거, 모르타르 타설 및 고르기 작업을 포함한다. 2. 모르타르배합(1:3) : 0.03㎥/㎡ 3. 모르타르 타설(모르타르) ∴ 일당 시공량 : Q = 50㎥/일 / 0.03㎥/㎡ = 1666.67㎡/일 1) 미 장 공 : 2인/일 / Q ㎡/일 2) 기계설비공 : 1인/일 / Q ㎡/일 3) 보통 인부 : 2인/일 / Q ㎡/일 4) 모르타르 펌프(37KW) : 1대/일 × 8hr/대 / Q ㎡/일 5) 믹서(0.3㎥) : 1대/일 × 8hr/대 / Q ㎡/일 6) 양수기(1.49KW) : 1대/일 × 8hr/대 / Q ㎡/일 7) 배관파이프(ø 50-2.6m) : 1대/일 × 8hr/대 / Q ㎡/일	[건축] 9-1-1 모르타르배합 [건축]9-1-3 모르타르 타설
d	바닥고르기모르타르 (1 : 3,T = 10㎜)	㎡	1. 작업조건 1) 본 품은 모르타르 타설장비를 이용한 바닥 모르타르 타설 기준이다. 2) 준비작업(바탕청소, 보양 등), 압송관 조립 및 철거, 모르타르 타설 및 고르기 작업을 포함한다. 2. 모르타르배합(1:3) : 0.001㎥/㎡ 3. 모르타르 타설(모르타르) ∴ 일당 시공량 : Q = 50㎥/일 / 0.001㎥/㎡ = 5000.0㎡/일 1) 미 장 공 : 2인/일 / Q ㎡/일 2) 기계설비공 : 1인/일 / Q ㎡/일 3) 보통 인부 : 2인/일 / Q ㎡/일 4) 모르타르 펌프(37KW) : 1대/일 × 8hr/대 / Q ㎡/일 5) 믹서(0.3㎥) : 1대/일 × 8hr/대 / Q ㎡/일 6) 양수기(1.49KW) : 1대/일 × 8hr/대 / Q ㎡/일 7) 배관파이프(ø 50-2.6m) : 1대/일 × 8hr/대 / Q ㎡/일	[건축] 9-1-1 모르타르배합 [건축]9-1-3 모르타르 타설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
3.02	방수시트설치
a	아스팔트방수시트
a-1	아스팔트방수시트 (상하부,T=3mm)	㎡	1. 바탕처리 1) 방 수 공:0.036인 2) 보통인부:0.015인 3) 공구손료 및 경장비(엔진송풍기, 연마기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% 2. 방수프라이머 1) 프라이머(200ℓATSM D41):0.30ℓ 2) 방 수 공:0.011인 3) 보통인부:0.005인 4) 공구손료 : 인력품의 2% 3. 시트방수 1) Sheet 방수(T=3㎜):1.20㎡ 2) 부탄(L.P.G,공업용):0.08㎏ 3) 방 수 공:0.06인 4) 보통인부:0.03인 5) 공구손료 및 경장비(토치 등)의 기계경비 : 인력품의 3%	[건축]6-1-1 바탕처리 [건축]6-1-2 방수프라이머 바름 [건축]6-3-1 가열식시트 붙임
a-2	아스팔트방수시트 (벽체,T=3mm)	㎡	1. 바탕처리 1) 방 수 공:0.040인 2) 보통인부:0.017인 3) 공구손료 및 경장비(엔진송풍기, 연마기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% 2. 방수프라이머 1) 프라이머(200ℓATSM D41):0.30ℓ 2) 방 수 공:0.011인 3) 보통인부:0.005인 4) 공구손료 : 인력품의 2% 3. 시트방수 1) Sheet 방수(T=3㎜):1.20㎡ 2) 부탄(L.P.G,공업용):0.08㎏ 3) 방 수 공:0.08인 4) 보통인부:0.04인 5) 공구손료 및 경장비(토치 등)의 기계경비 : 인력품의 3%	[건축]6-1-1 바탕처리 [건축]6-1-2 방수프라이머 바름 [건축]6-3-1 가열식시트 붙임

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
a-3	아스팔트방수시트 (보강부,T=3mm)	㎡	1. 재 료 비 1) Sheet 방수(T=3㎜):1.20㎡ 2) 부탄(L.P.G,공업용):0.08㎏ 2. 노 무 비 1) 방 수 공: 0.08인 2) 보통인부: 0.04인 3. 공구손료 및 경장비(토치 등)의 기계경비 : 인력품의 3%	[건축]6-3-1 가열식시트 붙임
b	자착식방수시트
b-1	자착식시트방수 (상하부)	㎡	1. 바탕처리 1) 방 수 공:0.036인 2) 보통인부:0.015인 3) 공구손료 및 경장비(엔진송풍기, 연마기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% 2. 방수프라이머 1) 프라이머(200ℓATSM D41):0.30ℓ 2) 방 수 공:0.011인 3) 보통인부:0.005인 4) 공구손료 : 인력품의 2% 3. 시트방수 1) 자착식시트:1.20㎡ 2) 방 수 공:0.026인 3) 보통인부:0.016인	[건축]6-1-1 바탕처리 [건축]6-1-2 방수프라이머 바름 [건축]6-3-3 자착식시트 붙임
b-2	자착식시트방수 (벽체)	㎡	1. 바탕처리 1) 방 수 공:0.040인 2) 보통인부:0.017인 3) 공구손료 및 경장비(엔진송풍기, 연마기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% 2. 방수프라이머 1) 프라이머(200ℓATSM D41):0.30ℓ 2) 방 수 공:0.011인 3) 보통인부:0.005인 4) 공구손료 : 인력품의 2% 3. 시트방수 1) 자착식시트:1.20㎡ 2) 방 수 공:0.036인 3) 보통인부:0.020인	[건축]6-1-1 바탕처리 [건축]6-1-2 방수프라이머 바름 [건축]6-3-3 자착식시트 붙임

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c	벤토나이트방수시트
c-1	벤토나이트방수시트 (상하부,T=4.5mm)	㎡	1. 재료비 1) 벤토나이트방수재(시트):1.15㎡ 2) 벤토나이트씰재:0.15ℓ 3) 벤토나이트알갱이:0.80㎏ 4) PE필름(t = 0.04mm):0.60㎡ 5) 카트리지(화약):10.50개 6) 콘크리트못(D32mm):10.50개 7) 와셔:10.50개 8) 조인트테이프:1.10m 2. 노무비 1) 방 수 공:0.027인 2) 보통인부:0.009인 3. 공구손료 및 경장비(에어콤프, 화약총 등)의 기계경비 : 인력품의3%	[건축]6-5-3 벤토나이트방수 붙임
c-2	벤토나이트방수시트 (벽체,T=4.5mm)	㎡	1. 재료비 1) 벤토나이트방수재(시트):1.20㎡ 2) 벤토나이트씰재:0.42ℓ 3) 벤토나이트알갱이:0.80㎏ 4) PE필름(t = 0.04mm):0.80㎡ 5) 카트리지(화약):10.50개 6) 콘크리트못(D32mm):10.50개 7) 와셔:10.50개 8) 조인트테이프:1.10m 2. 노무비 1) 방 수 공:0.032인 2) 보통인부:0.011인 3. 공구손료 및 경장비(에어콤프, 화약총 등)의 기계경비 : 인력품의3%	[건축]6-5-3 벤토나이트방수 붙임
4.	보온공사비 (열풍기)	Span	1. 적용기준 1) 동절기 보온공사비 적용기간:동년12월～익년 2월(3개월) 2) 열풍기:양단부에 가동열풍기 1대씩, 예비열풍기 1대를 배치한다. 3) 예정공정표에 의거 소요공사비를 산출하고 시공완료후 정산한다. 4) 차단막:보온이 가능한 천막지 사용 5) 설치 및 철거:보통인부 2인이 설치 및 철거하는 것으로 한다. 6) 1Span분을 구입하여 6회 사용하는 것으로 한다. 2. 차단막 설치비 - 수량산출:구조물폭×(양단부+1Span길이) = 12m×(8m×2+18m) = 408㎡/span 1) 비닐Sheet(T=1mm):408㎡/span/6회 = 68㎡/span 2) 보통인부:2인×3회/span = 6인/span 3. 열풍기 사용료(100,000Kcal/hr) 1) 가동열풍기:2대×24시간×30일 = 1440hr/span 2) 예비열풍기:2대×24시간×30일 = 1440hr/span 3) 백등유:9.50ℓ×2대×24시간×2/3(가동율)×12일=3648ℓ/span 4) 기계조정원:1인×12일 = 12인/span	참고자료

Ⅲ-2. 지하차도

번호

공      종

단위

단 가 산 출 (예 시)

비  고

1.01

콘크리트타설

a

바닥콘크리트

(무근, 펌프차, 슬럼프15cm, Type-Ⅰ)

㎥

1. 적용범위

본 품은 콘크리트펌프차(80㎥/hr이상)를 활용한 콘크리트 타

설에 적용하며 나머지 조건은 건설표준품셈을 참고하여 슬럼

프치, 시설유형 및 현장조건에 따라 조정한다.

2. 일일시공량

(일당)

슬럼프	기준 시공량(㎥)
	무근구조물	철근구조물
8~12cm	130	125
15cm	135	130
18cm이상	145	140

가. 시공량(㎥) : 기준시공량 × f1(시설유형) × f2(현장조건)

※ 펌프차의 타설범위(타설높이 및 수평거리)를 초과하여

펌프차 이동 및 재셋팅이 필요한 경우 회당 시공량의

5%을 감하여 적용한다.

나. 시설유형(f1)

유형	Type-Ⅰ	Type-Ⅱ	Type-Ⅲ	Type-Ⅳ
f1	1.4	1.0	0.8	0.3

다. 현장조건(f2)

유형	조건-1	조건-2	조건-3
f2	1.2	1.0	0.8

∴ Q(시공량)= 135㎥/일 × 1.4(f1) × 1.0(f2) = 189.0㎥/일

3. 인력 및 장비 편성

1) 노무비

가. 콘크리트공 : (3인/일-1인<진동기제외>) / Q㎥/일

나. 특별인부 : (1인/일-1인<진동기제외>) / Q㎥/일

다. 보통인부 : 1인/일 / Q㎥/일

라. 형틀목공 : 1인/일 / Q㎥/일

* 본 편성인력은 콘크리트 진동기 사용 기준으로

진동기를 사용하지 않는 경우 콘크리트공과 특별

인부를 각 1인 제외한다.

* 콘크리트 타설작업 시 거푸집 및 동바리의 변형·변위 침하 발생에 따른 거푸집 작업 등 별도 인력이 필요하다고 판단되는 경우 형틀목공을 추가 계상한다.

2) 콘크리트펌프차(80㎥이상)

: 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

3) 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의

기계경비는 : 노무비의 5%

4) 타설 후 발생하는 잔여 콘크리트(배관 내 잔여물 등)의 재료비는 : 노무비의 5%

4. 양생비(무근)

1) 특별인부:0.22인/10㎥=0.022인

2) 제잡비(양생손료,기구손료):인력품의 31%

[공통] 6-1-4 콘크리트 펌프차타설

2025년건설표준품셈 6-1 콘크리트 및 2016년건설

표준품셈

6-1-2-2

양생비

번호

공      종

단위

단 가 산 출 (예 시)

비  고

b

구체콘크리트

(철근,펌프차,

슬럼프15cm, Type-Ⅱ)

㎥

1. 적용범위

본 품은 콘크리트펌프차(80㎥/hr이상)를 활용한 콘크리트 타설

에 적용하며 나머지 조건은 건설표준품셈을 참고하여 슬럼프     치, 시설유형 및 현장조건에 따라 조정한다.

2. 일일시공량

(일당)

슬럼프	기준 시공량(㎥)
	무근구조물	철근구조물
8~12cm	130	125
15cm	135	130
18cm이상	145	140

가. 시공량(㎥) : 기준시공량 × f1(시설유형) × f2(현장조건)

※ 펌프차의 타설범위(타설높이 및 수평거리)를 초과하여

펌프차 이동 및 재셋팅이 필요한 경우 회당 시공량의

5%을 감하여 적용한다.

나. 시설유형(f1)

유형	Type-Ⅰ	Type-Ⅱ	Type-Ⅲ	Type-Ⅳ
f1	1.4	1.0	0.8	0.3

다. 현장조건(f2)

유형	조건-1	조건-2	조건-3
f2	1.2	1.0	0.8

∴ Q(시공량)= 130㎥/일 × 1.0(f1) × 1.0(f2) = 130.0㎥/일

3. 인력 및 장비 편성

1) 노무비

가. 콘크리트공 : 4인/일 / Q㎥/일

나. 특별인부 : 1인/일 / Q㎥/일

다. 보통인부 : 1인/일 / Q㎥/일

라. 형틀목공 : 1인/일 / Q㎥/일

* 본 편성인력은 콘크리트 진동기 사용 기준으로

진동기를 사용하지 않는 경우 콘크리트공과 특별

인부를 각 1인 제외한다.

* 콘크리트 타설작업 시 거푸집 및 동바리의 변형·변위 침하 발생에 따른 거푸집 작업 등 별도 인력이 필요하다고 판단되는 경우 형틀목공을 추가 계상한다.

2) 콘크리트펌프차(80㎥이상)

: 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

3) 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의 기계경비는

: 노무비의 5%

4) 타설 후 발생하는 잔여 콘크리트(배관 내 잔여물 등)의 재료비는 : 노무비의 5%

4. 양생비(철근)

1) 특별인부:0.07인/10㎥=0.007인

2) 제잡비(양생손료,기구손료):인력품의 41%

[공통] 6-1-4 콘크리트 펌프차타설

2025년건설

표준품셈     6-1 콘크리트 및 2016년건설

표준품셈     6-1-2-2 양생비

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
1.02	거푸집
a	합판거푸집 (6회,H = 0～7m)	㎡	1. 합판거푸집(H = 0∼7m이하) 1) 재 료 비 - 합판(12㎜):1.030㎡×32.7/100 - 각재:0.038㎥×32.7/100 - 소모자재(박리재 등):주자재비의 11%적용 2) 설치 및 해체(6회,간단) ∴ Q(시공량) = 50㎡/일 ① 형틀목공: 5인/일 / Q㎡/일 ② 보통인부: 2인/일 / Q㎡/일 ③ 공구손료 및 경장비 기계경비:인력품의 1% ※ 참조 - 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.	[공통]6-3-1 합판거푸집 설치 및 해체
b	합판거푸집 (4회,H = 0～7m)	㎡	1. 합판거푸집(H = 0∼7m이하) 1) 재 료 비 - 합판(12㎜):1.030㎡×38.0/100 - 각재:0.038㎥×38.0/100 - 소모자재(박리재 등):주자재비의 9%적용 2) 설치 및 해체(4회,보통) ∴ Q(시공량) = 45㎡/일 ① 형틀목공: 5인/일 / Q㎡/일 ② 보통인부: 2인/일 / Q㎡/일 ③ 공구손료 및 경장비 기계경비:인력품의 1% ※ 참조 - 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.	[공통]6-3-1 합판거푸집 설치 및 해체
c	합판거푸집 (3회,H = 0～7m)	㎡	1. 합판거푸집(H = 0∼7m이하) 1) 재 료 비 - 합판(12㎜):1.030㎡×44.3/100 - 각재:0.038㎥×44.3/100 - 소모자재(박리재 등):주자재비의 8%적용 2) 설치 및 해체(3회,복잡) ∴ Q(시공량) = 30㎡/일 ① 형틀목공: 5인/일 / Q㎡/일 ② 보통인부: 2인/일 / Q㎡/일 ③ 공구손료 및 경장비 기계경비:인력품의 1% ※ 참조 - 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.	[공통]6-3-1 합판거푸집 설치 및 해체

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
d	문양거푸집 (판넬)	㎡	1. 거푸집설치(합판, 유로폼 등)는 별도 계상한다. 2. 재 료 비(1회사용) 1) 문양거푸집: 1.0㎡ 2) 잡재료 및 소모재료비(고정못 등): 주재료비의 2% 3. 설치 및 해체 - 형틀목공 : 0.07인 - 보통인부 : 0.03인	[공통]6-3-4 문양거푸집
e	유로폼 (벽체, 보통, H=0～7m)	㎡	1. 유로폼(H = 0∼7m이하) 1) 재 료 비 - 패널(600×1200㎜):0.89매/10㎡ - 내부패널((200+200)×1200㎜):0.03매/10㎡ - 부자재(웨지핀, 플랫타이, 강관파이프, 후크) : 주자재비의 52% - 소모재료(박리재 등) : 주자재비의 5% 2) 설치 및 해체(보통) ∴ Q(시공량) = 35㎡/일 ① 형틀목공: 4인/일 / Q㎡/일 ② 보통인부: 1인/일 / Q㎡/일 ③ 공구손료 및 경장비 기계경비:인력품의 3% ※ 참조 - 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.	[공통] 6-3-3 유로폼 설치 및 해체
1.03	구조물비계
a	강관비계
a-1	강관비계 (3개월, H = 10m이하)	㎡	1. 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단)설치, 해체 작업이 포함되어 있다. 2. 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율 적용 3. 설치 및 해체 1) 비 계 공 : 0.05인 2) 보통인부 : 0.02인 3) 공구손료 및 경장비(전동드릴 등) : 인력품의 2%	[공통]2-7-1 강관비계
a-2	강관비계 (3개월, H = 10m초과∼20m이하)	㎡	1. 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단)설치, 해체 작업이 포함되어 있다. 2. 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율 적용 3. 설치 및 해체 1) 비 계 공 : 0.06인 2) 보통인부 : 0.02인 3) 공구손료 및 경장비(전동드릴 등) : 인력품의 2%	[공통]2-7-1 강관비계

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
a-3	강관비계 (3개월, H = 20m초과∼30m이하)	㎡	1. 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단)설치, 해체 작업이 포함되어 있다. 2. 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율 적용 3. 설치 및 해체 1) 비 계 공 : 0.07인 2) 보통인부 : 0.02인 3) 공구손료 및 경장비(전동드릴 등) : 인력품의 2%	[공통]2-7-1 강관비계
b	시스템비계
b-1	시스템비계 (3개월, H = 10m이하)	㎡	1. 적용기준 1) 본 품은 비계(발판 및 내부계단 포함)설치, 해체 작업이 포함되어 있다. 2) 현장여건에 따라 장비(크레인 등)가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다. 2. 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율 적용 3. 설치 및 해체 1) 비 계 공 : 0.04인 2) 보통인부 : 0.01인	[공통]2-7-2 시스템비계
b-2	시스템비계 (3개월, H = 10m초과∼20m이하)	㎡	1. 적용기준 1) 본 품은 비계(발판 및 내부계단 포함)설치, 해체 작업이 포함되어 있다. 2) 현장여건에 따라 장비(크레인 등)가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다. 2. 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율 적용 3. 설치 및 해체 1) 비 계 공 : 0.05인 2) 보통인부 : 0.01인	[공통]2-7-2 시스템비계
b-3	시스템비계 (3개월, H = 20m초과∼30m이하)	㎡	1. 적용기준 1) 본 품은 비계(발판 및 내부계단 포함)설치, 해체 작업이 포함되어 있다. 2) 현장여건에 따라 장비(크레인 등)가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다. 2. 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율 적용 3. 설치 및 해체 1) 비 계 공 : 0.06인 2) 보통인부 : 0.01인	[공통]2-7-2 시스템비계
c	가설계단
c-1	경사형 (3개월, H =6m이하)	㎡	1. 본 품은 6m이하에서 강관(Φ48.6mm), 조립형 발판을 사용하여 가설계단을 경사형태로 조립·설치 하는 기준이고, 가설계단의 폭은 0.9m이하를 기준으로, 비계 및 발판 설치·해체 작업이 포함 되어 있다. 2. 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율 적용 3. 설치 및 해체 1) 비 계 공 : 0.27인 2) 보통인부 : 0.09인 3) 공구손료 및 경장비(전동드릴 등) : 인력품의 2%	[공통]2-7-5 경사형 가설 계단

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c-2	타워형 (3개월)	㎡	1. 본 품은 일체형 발판을 사용하여 가설계단을 타워형 태로 설치하는 기준이며, 가설계단의 폭은 0.9m이하를 기준으로, 비계 및 발판 설치·해체 작업이 포함 되어있다. 2. 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율 적용 3. 설치 및 해체 1) 비 계 공 : 0.20인 2) 보통인부 : 0.07인 3) 크레인(10ton) : 0.06hr	[공통]2-7-6 타워형 가설 계단
1.04	동바리
a	강관동바리
a-1	강관동바리 (3개월, H=2.5m이하)	공/㎥	1. 강관동바리(설치간격0.6m초과~0.8m이하) 1) 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 - 잡재료 및 소모재료(고정못 등) : 주재료비의 5% 2) 설치 및 해체 - 형틀목공 : 0.54인/10(공/㎥) = 0.054인/공/㎥ - 보통인부 : 0.21인/10(공/㎥) = 0.021인/공/㎥	[공통]2-6-1 강관동바리 [공통]2-2-5 공기에 대한 손율
			2. 강관동바리(설치간격0.6m이하) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 120%적용
			3. 강관동바리(설치간격0.8m초과) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 90%적용
a-2	강관동바리 (3개월, H=2.5m초과∼3.5m이하)	공/㎥	1. 강관동바리(설치간격0.6m초과~0.8m이하) 1) 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 - 잡재료 및 소모재료(고정못 등) : 주재료비의 5% 2) 설치 및 해체 - 형틀목공 : 0.58인/10(공/㎥) = 0.058인/공/㎥ - 보통인부 : 0.23인/10(공/㎥) = 0.023인/공/㎥	[공통]2-6-1 강관동바리 [공통]2-2-5 공기에 대한 손율
			2. 강관동바리(설치간격0.6m이하) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 120%적용
			3. 강관동바리(설치간격0.8m초과) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 90%적용
a-3	강관동바리 (3개월, H=3.5m초과∼4.2m이하)	공/㎥	1. 강관동바리(설치간격0.6m초과~0.8m이하) 1) 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 - 잡재료 및 소모재료(고정못 등) : 주재료비의 5% 2) 설치 및 해체 - 형틀목공 : 0.63인/10(공/㎥) = 0.063인/공/㎥ - 보통인부 : 0.25인/10(공/㎥) = 0.025인/공/㎥	[공통]2-6-1 강관동바리 [공통]2-2-5 공기에 대한 손율
			2. 강관동바리(설치간격0.6m이하) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 120%적용
			3. 강관동바리(설치간격0.8m초과) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 90%적용

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b	시스템동바리
b-1	시스템동바리 (3개월, H = 10m이하)	공/㎥	1. 시스템동바리(설치간격0.6m초과~1.2m이하) 1) 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 설치 및 해체 - 형틀목공: 0.58/10(공/㎥) = 0.058인/공/㎥ - 보통인부: 0.18/10(공/㎥) = 0.018인/공/㎥ 3) 기계경비 - 크레인(15ton): 0.17hr/10(공/㎥)=0.017hr/공/㎥	[공통]2-6-3 스템동바리 [공통]2-2-5 공기에 대한 손율
			2. 시스템동바리(설치간격0.6m이하) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 120%적용 3) 기계경비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 120%적용
			3. 시스템동바리(설치간격1.2m초과) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 90%적용 3) 기계경비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 90%적용
b-2	시스템동바리 (3개월, H=10m초과∼20m이하)	공/㎥	1. 시스템동바리(설치간격0.6m초과~1.2m이하) 1) 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 설치 및 해체 - 형틀목공: 0.68/10(공/㎥) = 0.068인/공/㎥ - 보통인부: 0.21/10(공/㎥) = 0.021인/공/㎥ 3) 기계경비 - 크레인(15ton): 0.25hr/10(공/㎥)=0.025hr/공/㎥	[공통]2-6-3 스템동바리 [공통]2-2-5 공기에 대한 손율
			2. 시스템동바리(설치간격0.6m이하) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 120%적용 3) 기계경비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 120%적용
			3. 시스템동바리(설치간격1.2m초과) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 90%적용 3) 기계경비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 90%적용
b-3	시스템동바리 (3개월, H=20m초과∼30m이하)	공/㎥	1. 시스템동바리(설치간격0.6m초과~1.2m이하) 1) 재 료 비 - 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 설치 및 해체 - 형틀목공: 0.87/10(공/㎥) = 0.087인/공/㎥ - 보통인부: 0.27/10(공/㎥) = 0.027인/공/㎥ 3) 기계경비 - 크레인(20ton): 0.288hr/10(공/㎥)=0.028hr/공/㎥	[공통]2-6-3 스템동바리 [공통]2-2-5 공기에 대한 손율
			2. 시스템동바리(설치간격0.6m이하) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 120%적용 3) 기계경비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 120%적용
			3. 시스템동바리(설치간격1.2m초과) 1) 재료비(설계수량 적용) : 손율 6% 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 90%적용 3) 기계경비(설치간격0.6m초과~1.2m이하)의 : 90%적용

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c	수평연결재(강관)
	수평연결재(3개월)	㎡	1. 수평연결재(설치간격0.6m초과~0.8m이하) 1) 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율 적용 2) 설치 및 해체(1단 설치일 때) - 형틀목공: 0.02인 - 보통인부: 0.01인	[공통]2-6-1 강관동바리 [공통]2-2-5 공기에 대한 손율
			2. 수평연결재(설치간격0.6m이하) 1) 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 120%적용
			3. 수평연결재(설치간격0.8m초과) 1) 재료비(설계수량 적용) : 건설표준품셈 [공통] 2-2-5 공기에 대한 손율 적용 2) 노무비(설치간격0.6m초과~0.8m이하)의 : 90%적용
1.05	시공이음면정리	㎡	1. 노무비 1) 특별인부:0.12인 2) 보통인부:0.12인 2. 공구손료 및 경장비(소형브레이커, 치핑기 등)의 기계경비 (인력품의 8%)	[공통]6-1-12 콘크리트 치핑
1.06	신축이음장치
a	신축이음 (스티로폼,T=20㎜)	㎡	1. 재 료 비 1) 스티로폼(T = 20㎜):1.10㎡ 2) 접착제:0.035㎏ 2. 설 치 비 1) 형틀목공 : 0.029인 2) 보통인부 : 0.006인	[공통]6-3-10 신축이음 2.채움재설치
b	다웰바설치 (D25×1000㎜)	개	1. 재료비 1) 원형봉강(D25×1,000㎜):1.00m×3.85㎏/m×1.03(할증)=3.96㎏ 2) 철근가공조립(Type-Ⅰ):0.00385ton 3) P.V.C Pipe(D30㎜):0.55m 4) P.V.C Cap(D35㎜):1개 5) 녹막이페인트(2회):0.063㎡ 6) 채움제(브로운아스팔트):0.0003㎥ 2. 설치비 1) 형틀목공:0.043인 2) 보통인부:0.009인	[공통]6-3-10 신축이음 1.다웰바설치
c	충진재채움 (실런트,20×20㎜)	m	1. 수량산출 : 0.02m×0.02m×1.0m×1400㎏/㎥×1.20(할증)=0.672㎏ 2. 재료비(실런트,비중,1.40):0.672㎏ 3. 설치비 1) 방 수 공:0.021인 2) 보통인부:0.004인 3) 공구손료:인력품의 1%	[공통]6-3-10 신축이음 3.실링마감
d	지수판설치(PVC 지수판,300×9T)	m	1. 재료비 1) PVC 지수판(300×9):1.04m 2) PVC 용접봉:0.042㎏ 3) 철 선(#8):0.210㎏ 2. 설 치 비 1) 특별인부:0.151인 2) 보통인부:0.116인 3) 공구손료 및 경장비(PVC 용접기 등)의 기계경비 : 인력품의 3%	[공통]6-3-91.PVC 용접

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
1.07	방 수 공
a	아스팔트방수
a-1	아스팔트방수 (벽체,2회)	㎡	1. 재 료 비 아스팔트(AP-3):2.0㎏×2회 = 4.00㎏ 2. 설 치 비 1) 방 수 공:0.021인 2) 보통인부:0.005인 3. 외벽의 높이(H=10.8m초과부터)에 따라 품을 가산할 수 있다	[건축]6-5-1 액상형 흡수방지 방수도포
a-2	아스팔트방수 (바닥,2회)	㎡	1. 재 료 비 아스팔트(AP-3):1.50㎏×2회 = 3.00㎏ 2. 설 치 비 1) 방 수 공:0.021인 2) 보통인부:0.005인	[건축]6-5-1 액상형 흡수방지 방수도포
b	시트방수
b-1	시트방수 (상하부,T = 3㎜)	㎡	1. 바탕처리 1) 방 수 공:0.036인 2) 보통인부:0.015인 3) 공구손료 및 경장비(엔진송풍기, 연마기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% 2. 방수프라이머 1) 프라이머(200ℓATSM D41):0.30ℓ 2) 방 수 공:0.011인 3) 보통인부:0.005인 4) 공구손료 : 인력품의 2% 3. 시트방수 1) Sheet 방수(T=3㎜):1.20㎡ 2) 부탄(L.P.G,공업용):0.08㎏ 3) 방 수 공:0.06인 4) 보통인부:0.03인 5) 공구손료 및 경장비(토치 등)의 기계경비 : 인력품의 3%	[건축]6-1-1 바탕처리 [건축]6-1-2 방수프라이머 바름 [건축]6-3-1 가열식시트 붙임
b-2	시트방수 (벽체,T = 3㎜)	㎡	1. 바탕처리 1) 방 수 공:0.040인 2) 보통인부:0.017인 3) 공구손료 및 경장비(엔진송풍기, 연마기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% 2. 방수프라이머 1) 프라이머(200ℓATSM D41):0.30ℓ 2) 방 수 공:0.011인 3) 보통인부:0.005인 4) 공구손료 : 인력품의 2% 3. 시트방수 1) Sheet 방수(T=3㎜):1.20㎡ 2) 부탄(L.P.G,공업용):0.08㎏ 3) 방 수 공:0.08인 4) 보통인부:0.04인 5) 공구손료 및 경장비(토치 등)의 기계경비 : 인력품의 3%	[건축]6-1-1 바탕처리 [건축]6-1-2 방수프라이머 바름 [건축]6-3-1 가열식시트 붙임

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b-3	시트방수 (보강부,T = 3㎜)	㎡	1. 재 료 비 1) Sheet 방수(T=3㎜):1.20㎡ 2) 부탄(L.P.G,공업용):0.08㎏ 2. 노 무 비 1) 방 수 공: 0.08인 2) 보통인부: 0.04인 3. 공구손료 및 경장비(토치 등)의 기계경비 : 인력품의 3%	[건축]6-3-1 가열식시트 붙임
c	모 르 터
c-1	바닥고르기 모르타르 (1 : 3,T = 10㎜)	㎡	1. 작업조건 1) 본 품은 모르타르 타설장비를 이용한 바닥 모르타르 타설 기준이다. 2) 준비작업(바탕청소, 보양 등), 압송관 조립 및 철거, 모르타르 타설 및 고르기 작업을 포함한다. 2. 모르타르배합(1:3) : 0.001㎥/㎡ 3. 모르타르 타설(모르타르) ∴ 일당 시공량 : Q = 50㎥/일 / 0.001㎥/㎡ = 5000.0㎡/일 1) 미 장 공 : 2인/일 / Q ㎡/일 2) 기계설비공 : 1인/일 / Q ㎡/일 3) 보통 인부 : 2인/일 / Q ㎡/일 4) 모르타르 펌프(37KW) : 1대/일 × 8hr/대 / Q ㎡/일 5) 믹서(0.3㎥) : 1대/일 × 8hr/대 / Q ㎡/일 6) 양수기(1.49KW) : 1대/일 × 8hr/대 / Q ㎡/일 7) 배관파이프(ø 50-2.6m) : 1대/일 × 8hr/대 / Q ㎡/일	[건축] 9-1-1 모르타르배합 [건축]9-1-3 모르타르 타설
c-2	상부보호 모르타르 (1 : 3,T = 50㎜)	㎡	1. 모르타르배합(1:3) : 1㎥×0.05 = 0.05㎥ 2. 모르타르바름(3.6m이하, 2회기준) ∴ 일당 시공량 Q = 29㎡/일 1) 미 장 공: 2인/일 / Q ㎡/일 2) 보통인부: 1인/일 / Q ㎡/일 3) 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비 (인력품의 2%적용)	[건축]9-1-1 모르타르 배합 [건축]9-1-2 모르타르 바름
c-3	바닥보호 모르타르 (1 : 3,T = 30㎜)	㎡	1. 작업조건 1) 본 품은 모르타르 타설장비를 이용한 바닥 모르타르 타설 기준이다. 2) 준비작업(바탕청소, 보양 등), 압송관 조립 및 철거, 모르타르 타설 및 고르기 작업을 포함한다. 2. 모르타르배합(1:3) : 0.03㎥/㎡ 3. 모르타르 타설(모르타르) ∴ 일당 시공량 : Q = 50㎥/일 / 0.03㎥/㎡ = 1666.67㎡/일 1) 미 장 공 : 2인/일 / Q ㎡/일 2) 기계설비공 : 1인/일 / Q ㎡/일 3) 보통 인부 : 2인/일 / Q ㎡/일 4) 모르타르 펌프(37KW) : 1대/일 × 8hr/대 / Q ㎡/일 5) 믹서(0.3㎥) : 1대/일 × 8hr/대 / Q ㎡/일 6) 양수기(1.49KW) : 1대/일 × 8hr/대 / Q ㎡/일 7) 배관파이프(ø 50-2.6m) : 1대/일 × 8hr/대 / Q ㎡/일	[건축9-1-1 모르타르 배합 [건축]9-1-3 모르타르 타설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c-4	벽체보호 모르타르 (1 : 3,T = 5㎜)	㎡	1. 모르타르배합(1:3) : 1㎥×0.005 = 0.005㎥ 2. 모르타르바름(3.6m이하, 1회기준) ∴ 일당 시공량 Q = 40㎡/일 1) 미 장 공:2인/일 / Q ㎡/일 2) 보통인부:1인/일 / Q ㎡/일 3) 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비 (인력품의 2%적용)	[건축]9-1-1 모르타르 배합 [건축]9-1-2 모르타르 바름
d	시멘트벽돌쌓기 (0.5B)	㎡	1. 재료비(현장도착도) - 시멘트벽돌(190×90×57㎜):75매×1.05(할증) = 78.75매/㎡ 2. 모르타르(1:3) : 0.019㎥/㎡ 3. 노 무 비(3.6m이하) ∴ 일당 시공량 Q = 25㎡/일 1) 조 적 공: 3인/일 / Q ㎡/일 2) 보통인부: 1인/일 / Q ㎡/일 4. 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비(인력품의 2%)	[건축] 2-1-1 벽돌쌓기
1.08	배 수 시 설
a	배수뒷잡석채움 (소형장비)	㎥	1. 잡석구입 및 운반:1.04㎥(할증) 2. 작업조건 1) 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 구조물 뒤채움 기준이다. 2) 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다. 3) 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다. 4) 진동롤러(핸드가이드식) 기계경비 산정시 조정원은 계상하지 않는다. 5) 일당 시공량 Q = 110㎥/일 3. 인건비 1) 특별인부: 1인/일 / Q㎥/일 2) 보통인부: 1인/일 / Q㎥/일 4. 중기사용료 1) 굴착기(0.2㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 2) 진동롤러(핸드가이드식,0.7Ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 3) 살수차(5500ℓ): 0.5대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일	[공통] 3-4-4 뒤채움 및 다짐 (소형장비)

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b	드레인보드설치 (T = 20㎜)	㎡	1. 드레인보드 설치 1) 재료비:1.05㎡ 2) 설치비(보통인부):0.006인 2. Pin 설치(콘크리트 Gun 사용기준) 1) 재료비:0.667개/㎡×1.03(할증) = 0.687개/㎡ 2) 설치비(특별인부):1인/500㎡ = 0.002인/㎡ 3) 기구손료(재료비의 5%)	견적단가
c	부직포설치 (300g/㎡)	㎡	1. 재 료 비 1) 부직포(300g/㎡):1.05㎡ 2) 잡재료비(재료비의 2%) 2. 설치비 1) 특별인부 : 0.07인/100㎡ = 0.0007인/㎡ 2) 보통인부 : 0.04인/100㎡ = 0.0004인/㎡ 3) 굴착기(0.40㎥) : 0.10hr/100㎡ = 0.001hr/㎡ 4) 공구손료 및 경장비(봉합기)의 기계경비:인력품의 4%	[공통]5-2-1 매트부설
d	배수공설치 (PVC pipe,D75㎜)	m	1. 재료비(VG1,D75㎜) : 1.05m 2. 설치비(재료비의 5%)
e	스틸그레이팅설치 (각 종)	개	1. 재료비(각종):1개 2. 설치비(재료비의 5%)
f	공동구콘크리트타설 (기계타설)	m	1. 작업조건(예시,설계수량) 1) 터널할증계수 K=0.05 2) 콘트리트 타설체적 q=0.538㎥/m 2. 중기사용료 q = 0.538㎥/m, V = 0.6m/분(평균) , E = 0.4(평균) ∴ 단선터널의 경우 작업효율 E=0.3(불량)을 적용한다 Q = 60분×0.538㎥/m×0.6m/분×0.4 = 7.75㎥/hr 1) 콘크리트 피니셔(105.9 KW): 1m / 7.75㎥/hr×0.538㎥ = 0.069hr/m 2) 굴착기(0.70㎥): 1m / 7.75㎥/hr×0.538㎥ = 0.069hr/m	2016년건설 표준품셈 8-29 콘크리트 피니셔

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			3. 노무비 1) 포 장 공 : 2인/일 / (7.75㎥/hr×8hr)×(1+0.05)×0.538㎥ = 0.018인/m 2) 철 근 공 : 1인/일 / (7.75㎥/hr×8hr)×(1+0.05)×0.538㎥ = 0.009인/m 3) 보통인부 : 2인/일 / (7.75㎥/hr×8hr)×(1+0.05)×0.538㎥ = 0.018인/m 4. 수축줄눈설치 ∴ 수축줄눈 m당 연장(예시,설계수량) L=0.07 m/m 1) 재료비(브로운아스팔트) W=(0.006m×0.08m×0.07m)×2350㎏/㎥×1.03(할증) =0.081㎏/m 2) 노무비 ∴ 1일당 시공량 : 900m/일 - 특별인부:3인/일 / 900m/일×0.07 m = 0.00023인/m - 보통인부:2인/일 / 900m/일×0.07 m = 0.00016인/m	[토목]1-9-12 중앙분리대 설치(콘크리트 포설식) [토목]1-7-3 줄눈설치
1.09	스페이서설치
a	스페이서설치(벽체)	㎡	1. 재료비:벽체형 8개 2. 설치비(재료비의 5%)
b	스페이서설치 (슬래브 및 기초)	㎡	1. 재료비:슬래브형 4개 2. 설치비(재료비의 5%)
1.10	커플러설치(각종)	개	1. 재료비(커플러):1개 2. 설치비(재료비의 5%)
1.11	철근현장가공조립
a	철근현장가공조립 (Type-Ⅱ-1)	ton	1. 현장가공 ∴ Q(시공량) = 4.0ton/일 1) 철 근 공: 3인/일 / Qton/일 2) 보통인부: 1인/일 / Qton/일 3) 공구손료 및 경장비(철근 가공기 등)의 기계경비 : 인력품의 9% 2. 현장조립 ∴ Q(시공량) = 2.5ton/일 1) 철 근 공: 5인/일 / Qton/일 2) 보통인부: 2인/일 / Qton/일 3) 공구손료 및 경장비의 기계경비 : 인력품의 2% 4) 결속선(#20 0.9㎜):8.00㎏ ※ 참조 - 개소별 소량(0.5ton미만)의 시공 위치가 산재하는 경우 시공량의 50%까지 감하여 적용한다. - 현장여건(고소작업, 철근 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다.	[공통] 6-2-2 현장가공 [공통] 6-2-3 현장조립

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
1.12	타일붙이기
a	자기질타일붙이기 (벽체,떠붙이기, 110×190×15㎜)	㎡	1. 운반(덤프트럭 10.5ton트럭,20㎞이내) 1) 적재 및 적하 - ㎡당중량:(0.11m×0.19m×0.015m×2000㎏/㎥)×48개/1000㎏ = 0.03ton/㎡ - 적재톤수:10.5ton/대(덤프트럭 적재중량) - 적재중량:0.030ton/㎡×5㎡/묶음 = 0.15ton/묶음 - 적재횟수:10.5ton/대/0.15ton/묶음 = 70묶음/대 - 적 재:1분/회×70묶음/대 = 70분/대 - 적 하:1분/회×70묶음/대 = 70분/대 계:70.00분/대+70.00분/대 = 140분/대 2) 운반비 q1 = (5㎡/묶음×70묶음/대) = 350㎡/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 140.00분/대(적재), t3 = 140.00분/대(적하), t4 = 0.42분/대 ,t6 = 1.5분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차)×60분 = 68.57분/대 Cm = 140.00분/대+68.57분/대+140.00분/대+0.42분/대+1.5분/대 = 350.49분/대 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 350.49분/대/(60분×1.00×0.90)/350.00㎡/대 = 0.019hr/㎡ 3) 중기사용료(지게차2ton) q1 = 5㎡묶음 t1 = 1분(적재소요시간), t2 = 1분(적하소요시간) V1 = 10㎞/hr(적재시속도), V2 = 10㎞/hr(공차시속도) L = 0.02㎞(1회운반거리), f = 1.00, E = 1.00 Cm = (0.02㎞/10㎞/hr+0.02㎞/10㎞/hr)×60분+(1분+1분) = 2.24분 Q = 2.24분/대/(60분×1.00×1.00)/5㎡/묶음 = 0.007hr/㎡ 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1인실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.007hr/㎡ = 0.0018hr/㎡ 2. 재료비(자기질타일):1.03㎡(할증) 3. 바탕고르기(벽체,1:3기준) ∴ 일당 시공량 Q = 45㎡/일 1) 미 장 공: 2인/일 / Q ㎡/일 2) 보통인부: 1인/일 / Q ㎡/일 3) 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비는 인력품의 2% 4) 본 품은 모르타르 비빔 및 바름, 쇠흙손 마감, 물매 맞추기를 포함한다. 5) 타일공사 전 두께 24mm이하 (2회 바름)로 모르타르를 바르는 기준이다. 4. 타일붙임(떠붙이기) 1) 붙임재료(벽체,T=12mm기준) ① 붙임모르타르(1:3):0.014㎥/㎡ ② 줄눈모르타르(1:1):0.005㎥/㎡ ③ 재료의 할증은 포함되어 있음. 2) 타일붙임(벽체,0.04～0.10㎡적용) ∴ 일당 시공량 Q = 13㎡/일 ① 타 일 공: 2인/일 / Q ㎡/일 ② 보통인부: 1인/일 / Q ㎡/일 ③ 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비(인력품의 3%) 3) 타일줄눈(벽체,0.04～0.10㎡적용) ① 줄눈공:0.020인/㎡ ② 줄눈재 비빔, 줄눈설치 및 마무리 작업을 포함한다.	[건축]3-1-1 바탕고르기 [건축]3-2-1 떠붙이기 [건축]3-1-2 타일줄눈설치

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b	자기질타일붙이기 (벽체,압착붙이기, 90×190×15㎜)	㎡	1. 운반(덤프트럭 10.5ton트럭,20㎞이내) 1) 적재 및 적하 - ㎡당중량:(0.09m×0.19m×0.015m×2000㎏/㎥)×58개/1000㎏ = 0.03ton/㎡ - 적재톤수:10.5ton/대(덤프트럭 적재중량) - 적재중량:0.030ton/㎡×5㎡/묶음 = 0.15ton/묶음 - 적재횟수:10.5ton/대/0.15ton/묶음 = 70묶음/대 - 적 재:1분/회×70묶음/대 = 70분/대 - 적 하:1분/회×70묶음/대 = 70분/대 계:70.00분/대+70.00분/대 = 140분/대 2) 운반비 q1 = (5㎡/묶음×70묶음/대) = 350㎡/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 140.00분/대(적재), t3 = 140.00분/대(적하), t4 = 0.42분/대 ,t6 = 1.5분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 140.00분/대+68.57분/대+140.00분/대+0.42분/대+1.5분/대 = 350.49분/대 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 350.49분/대/(60분×1.00×0.90)/350.00㎡/대 = 0.019hr/㎡ 3) 중기사용료(지게차2ton) q1 = 5㎡묶음 t1 = 1분(적재소요시간), t2 = 1분(적하소요시간) V1 = 10㎞/hr(적재시속도), V2 = 10㎞/hr(공차시속도) L = 0.02㎞(1회운반거리), f = 1.00, E = 1.00 Cm = (0.02㎞/10㎞/hr+0.02㎞/10㎞/hr)×60분+(1분+1분) = 2.24분 Q = 2.24분/대/(60분×1.00×1.00)/5㎡/묶음 = 0.007hr/㎡ 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1인실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.007hr/㎡ = 0.0018hr/㎡ 2. 재료비(자기질타일):1.03㎡(할증) 3. 바탕고르기(벽체,1:3기준) ∴ 일당 시공량 Q = 45㎡/일 1) 미 장 공:2인/일 / Q ㎡/일 2) 보통인부:1인/일 / Q ㎡/일 3) 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비는 인력품의 2% 4) 본 품은 모르타르 비빔 및 바름, 쇠흙손 마감, 물매 맞추기를 포함한다. 5) 타일공사 전 두께 24mm이하 (2회 바름)로 모르타르를 바르는 기준이다. 4. 타일붙임(압착붙이기) 1) 붙임재료(벽체,T=7mm기준) ① 붙임모르타르(1:2):0.008㎥/㎡ ② 줄눈모르타르(1:1):0.001㎥/㎡ ③ 재료의 할증은 포함되어 있음. 2) 타일붙임(벽체,0.04～0.10㎡적용) ∴ 일당 시공량 Q = 15㎡/일 ① 타 일 공: 2인/일 / Q ㎡/일 ② 보통인부: 1인/일 / Q ㎡/일 ③ 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비(인력품의 3%) 3) 타일줄눈(벽체,0.04～0.10㎡적용) ① 줄눈공:0.020인/㎡ ② 줄눈재 비빔, 줄눈설치 및 마무리 작업을 포함한다.	[건축]3-1-1 바탕고르기 [건축] 3-2-2 압착붙이기 [건축]3-1-2 타일줄눈설치

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
1.13	지하차도조명공사	식	1. 지하차도조명공사 : 1식
1.14	펌프설비공사 (펌프포함)	식	2. 펌프설비공사(펌프포함) : 1식
1.15	파이프루프공법
a	강관추진 (토사,D600mm) 추진장(0～30m,예시)	m	1. 노무비 1) 중급기술자:1인/일/8.5m/일 = 0.118인/m 2) 특별 인부:2인/일/8.5m/일 = 0.235인/m 3) 보통 인부:1인/일/8.5m/일 = 0.118인/m 4) 용 접 공:2인/일/8.5m/일 = 0.235인/m 2. 중기사용료 1) 파이프추진기:1대×8hr/일/8.5m/일 = 0.941hr/m 2) 크레인(20ton):1대×8hr/일/8.5m/일 = 0.941hr/m 3) 발전기(50㎾):1대×8hr/일/8.5m/일 = 0.941hr/m 4) 용접기(교류200Amp):2대×8hr/일/8.5m/일 = 1.882hr/m	[공통]2-10-3 파이프 루프공 4.작업능력
b	강관제작설치 (D600mm, ℓ=16m)	m	1. 재료비 - 스파이럴강관(D609.6mm×8mm):1m 2. 가공비(천공4인이 1일 6m길이 강관 20본제작) - 6m×20본/일 = 120m/일 - 120m/일/16m = 7.5개(16m강관) - 강관1본당(철공):4인/7.50개/16m = 0.033인/m 3. 강관설치비(보통인부 3인이 1일 2본설치) - 보통인부:3인/2본/16m = 0.094인/m	견적단가
c	기계이동설치
c-1	기계이동설치 (수직)	회	1. 설치노무비 1) 중급기술자:1인/일/8hr/일×2hr/회 = 0.250인/회 2) 특별 인부:2인/일/8hr/일×2hr/회 = 0.500인/회 3) 용 접 공:1인/일/8hr/일×2hr/회 = 0.250인/회 4) 보통 인부:2인/일/8hr/일×2hr/회 = 0.500인/회 2. 중기사용료 1) 크레인:2.0hr/회 2) Jack:3hr/회	[공통] 2-10-3 파이프 루프공 5.기계이동 설치
c-2	기계이동설치 (수평)	회	1. 설치노무비 1) 중급기술자:1인/일/8hr/일×1.5hr/회 = 0.188인/회 2) 특별 인부:2인/일/8hr/일×1.5hr/회 = 0.375인/회 3) 용 접 공:1인/일/8hr/일×1.5hr/회 = 0.188인/회 4) 보통 인부:2인/일/8hr/일×1.5hr/회 = 0.375인/회 2. 중기사용료 1) 크레인:1.5hr/회	[공통] 2-10-3 파이프 루프공 5.기계이동 설치

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
d	강관내그라우팅 (1:3)	㎥	1. 재료비(모르타르,1:3) : 1㎥×1.10 = 1.10㎥ 2. 모르타르타설(인건비,붐타설) 1) 콘크리트공:0.044인/㎥ 2) 보통 인부:0.021인/㎥ 3. 기계사용료(콘크리트펌프차,80㎥/hr):5.89㎥/일	[건축]9-1-1 모르타르 배합 [2014년 표준품셈] 6-1-2-2 펌프차타설 인부
1.16	프론트잭킹공법
a	수평천공 (D150mm, 점성토)	m	1. 작업시간 ∴ 장비조합:수평보링기(Top-Mct)+발전기(50㎾)+양수기 (50mm) +크레인(10ton) Cm = Ti+Bi×Hi Ti = 준비이동시간 - 횡이동:0.70hr/개소, 종이동:2.00hr/개소 Bi = 천공소요시간(점성토):0.374hr/m Hi = 천공심도(평균심도):1000m/100본 = 10m Cm = ((0.70hr/개소×60m+2.00hr/개소×40m)/100m)+10m×0.374hr/m = 4.96hr/공 Q = 4.96hr/공/10m = 0.496hr/m 2. 장비조합 1) 수평보링기(Top-Mct):0.496hr/m 2) 발전기(50㎾):0.496hr/m 3) 양수기(50mm):0.496hr/m 4) 크레인(10ton):0.496hr/m 3. 인원배치 1) 중급기술자:1.112인/8hr×0.496hr/m = 0.069인/m 2) 보 링 공:2.259인/8hr×0.496hr/m = 0.140인/m 3) 특별 인부:3.157인/8hr×0.496hr/m = 0.196인/m 4) 보통 인부:2.238인/8hr×0.496hr/m = 0.139인/m 4. 재료비 1) 메탈크라운비트(NX):0.050개 2) 드라이브파이프(NX):0.025개 3) 드라이브파이프헤드(NX):0.025개 4) 드라이브파이프슈(NX):0.025개	2014년 표준품셈 5-17-1 수평천공
b	PC강선 설치철거 (8t～15.2mm)	m	1. 재료비 1) P.C강연선(15.2mm):9.072㎏/m 2) 고재처리:0.369㎏/m 2. 설치비 1) 특별인부:0.028인/m 2) 보통인부:0.024인/m 3) 철거비(설치비의80%) 3. 중기사용료 1) 윈치(22.38kW):0.112hr/m 2) 전력요금:0.66㎾/m 3) 철거비(설치비의80%)	2014년 표준품셈 5-17-2 강선제작 설치

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c	정착구 설치철거	조	1. 지압판제작(손율30%적용) 1) 재료비:강판(T=40mm):86.35㎏×30%(손율) = 25.905㎏ 2) 강판수동절단(T=40mm) - 산소(99%):604.5ℓ×1.0m = 604.50ℓ/조 - 아세틸렌(100%,AC,용접공):0.3506㎏×1.0m = 0.3506㎏/조 - 용접공:0.0133×1.0m = 0.0133인/조 - 특별인부:0.0067×1.0m = 0.0067인/조 - 기구손료(인건비의2%) 3) 강판구멍뚫기(T = 40mm, D22mm이상) - 절삭유(공구용윤활류):(0.0005ℓ×25mm)/9mm×5공 = 0.007ℓ/조 - 철골공:(0.020인×40mm)/9mm×5공 = 0.444인/조 - 잡소모품(인건비의5%) 4) 고재처리:7.85㎏ 2. 재료비 1) 철근(D13mm):12.687㎏ 2) 정착구(8t～15.2mm):0.30개 3) Anchor Bolt(D16×200):4개 4) 고재처리:0.369㎏ 3. 설치 및 철거 1) Anchor Bolt설치(D16mm):0.12인×4개 = 0.480인/조 2) 철근가공조립(Type-Ⅰ):12.3㎏/1000㎏ = 0.0123ton 3) 특별인부:0.163인 4) 보통인부:0.087인 4. 철거비(설치비의80%)	2014년 표준품셈 5-17-3 정착구설치 [기계] 13-2-2 강판절단 [기계] 13-4-2 1.강판구멍 뚫기
d	잭설치철거
d-1	잭설치철거 (프론트잭)	대	1. 설치비 1) 비 계 공:0.554인 2) 특별인부:0.311인 3) 보통인부:0.629인 2. 중기사용료(크레인,10ton):1.847hr 3. 철거비:설치비의 80% 적용	2014년 표준품셈 5-17-4 잭설치
d-2	잭설치철거 (페이스잭)	대	1. 설치비 1) 특별인부:0.100인 3) 보통인부:0.199인 2. 철거비:설치비의 80% 적용
e	선단슈관입 (구조물단면적 ,80～100㎡)	개소	1. 적용기준 - 구조물단면적:12.90m×6.80m = 87.72㎡ - 적용단면적(80㎡～100㎡적용) - 소요일수(H-형강사용시):5일 2. 인원편성 1) 작업반장:1.00인/일×5일/개소 = 5인/개소 2) 특별인부:3.065인/일×5일/개소 = 15.325인/개소 3) 용 접 공:4.65인/일×5일/개소 = 23.25인/개소 4) 보통인부:4.70인/일×5일/개소 = 23.50인/개소 5) 기 계 공:2.00인/일×5일/개소 = 10.00인/개소 6) 잡재료비(노무비의 2%)	2014년 표준품셈 5-17-5 선단슈관입

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
f	Box굴착 및 견인 (구조물단면적 ,60～80㎡)	m	1. 적용기준 - B(폭) = 12.90m, H(높이) = 6.80m 1) 사용장비 - Front Jack:35대 - Face Jack:48대 - 중압 Jack:18대 2) 구조물면적 - 도갱면적:2m×2.861m = 5.72㎡ - 각관면적:0.62m×12.90m = 8㎡ - 단 면 적:12.90×6.80-(5.72㎡+8.00㎡) = 74㎡ - 연 장:19m - 적 용:60～80㎡적용 ∴ 1일당 작업량:D = (0.30(보통토사)+0.25(자갈석인토사)/2 = 0.275m/일 2. 작업일수산정 - Box 굴착 및 견인:19m/0.275m/일 = 69.091일 - 선단슈관입:5일(선단슈소요일수)×1개소 = 5일 - Front Jack설치:35대/7대/일 = 5일 - Front Jack철거:35대/12대/일 = 2.917일 - 중압 Jack설치:18대/12대/일 = 1.5일 - 중압 Jack철거:18대/20대/일 = 0.9일 - 반출입일수:2일 - 구속일수:69.091일/7 = 9.87일 ∴ 총 작업일수:(69.091+5.000+5.000+2.917+1.500+0.900 +2+9.870)+1일 = 97일 3. Front Jack 장비조합 1) 유압펌프(YOB-20-6):8hr/일×97일×3대/19m = 122.53hr/m 2) 유압펌프(YOB-10-6):8hr/일×97일×3대/19m = 122.53hr/m 3) 조작반(YMB-16H):8hr/일×97일×3대/19m = 122.53hr/m 4) 조작반(YMB-16L):8hr/일×97일×4대/19m = 163.37hr/m 5) 프런트잭크(YCP-15-85):8hr/일×97일×35대/19m=1429.48hr/m 6) 페이스잭크(YUJ-3-40):8hr/일×97일×48대/19m=1960.42hr/m 7) 유압모호스(OH-12-10):8hr/일×97일×24대/19m = 980.21hr/m 8) 유압자호스(OH-9-10):8hr/일×97일×404대/19m = 16,500.21hr/m 4. 잔토반출(벨트콘베이어, 14.92㎾) ∴ 수량산출:(9.50/6+2대)×4 = 14대 - 발전기가동일:74.091일 - 1일가동시간:8hr - 14대×8hr/일×74.091일/19m = 436.747hr/m 5. 사용전력 1) Pump(YOB-20-6):15㎾×3대 = 45㎾ 2) Pump(YOB-10-6):7.5㎾×3대 = 22.5㎾ 3) 조명:500W×48칸/1000W = 24㎾ - 총계:45.00+22.50+24.00 = 91.5㎾ 4) 발전기(100㎾):8hr/일×74.091일/19m = 31.196hr/m	2014년 표준품셈 5-17-6 굴착및견인

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			6. 인원편성 1) 작업반장:1.000인×69.091일/19m = 3.636인/m 2) 특별인부:8.325인×69.091일/19m = 30.273인/m 3) 보통인부:5.952인×69.091일/19m = 21.644인/m 4) 기 계 공:2.000인×69.091일/19m = 7.273인/m 7. 막장토류벽 1) 토류벽(t = 60mm,각재):12.90m×6.80m×0.06m×1.10(할증)/19m = 0.305㎡ 2) 횡붙임목(90×90mm, 각재):12.90m×4개×0.09m×0.09m×1.10(할증)/19m = 0.024㎡ 3) 종붙임목(90×90mm, 각재):6.80m×5개×0.09m×0.09m×1.10(할증)/19m = 0.016㎡
1.17	지하차도부대공
a	난간설치 (H = 1.00m)	m	1. 재료비 2. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 43m/일 1) 철 공: 2인/일 / Qm/일 2) 보통인부: 1인/일 / Qm/일 3) 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비 : 인력품의 3%	[건축] 8-2-2 앵커고정식 난간
b	통과높이표지판설치 (D600mm)	개	1. 재료비 1) 표지판(원형, D600mm):1개 2. 설치비 1) 표지판 (1일당 시공량 22개소) - 특별인부:2인/일/22개소/일 = 0.09인/개 - 보통인부:1인/일/22개소/일 = 0.05인/개 2) 공구손료 및 경장비(드릴,발전기 등) 기계경비:인력품의 2% 3) 표지판의 설치높이를 고려하여 장비가 필요할 경우 별도 계상한다.	[토목] 1-8-1 교통 안전 표지판 설치

RECORD HISTORY

Rev.0('14.12.31) 철도건설공사 수량 및 단가산출 표준의 구성체계를 KR CODE집에 맞추어 항목별 체계로 개정하여 사용자가 손쉽게 이용하는데 목적을 둠.

Rev.1('16.04.30) 2016년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.2('16.12.31) 2016년 하반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.3('17.05.29) 2017년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.4('17.09.12) 2017년 하반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.5('18.03.19) 2018년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.6('18.11.19) 2018년 하반기 신규공종단가 및 관련부서 개정 요구사항 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.7('19.04.02) 2019년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.8('19.12.24) 2019년 하반기 신규공종단가 및 관련부서 개정 요구사항 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.9('20.06.30) 2020년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.10('21.05.18) 2021년 상반기 표준품셈 개정, 감사처분, 현장VOC 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.11('21.12.29) 공단 명칭, CI변경분 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.12('22.06.03) 2022년 건설공사 표준품셈 개정사항 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.13('23.03.31) 2023년 상반기 건설공사 표준품셈 개정사항 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.14('24.07.15) 2024년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분, 감사처분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.15('26.01.14) 2025년 건설공사 표준품셈 개정분, 감사처분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공