[붙임]

원주～제천 복선전철사업

Bi-block침목 생산설비심사 신청 공고(안)

2016. 11.

한국철도시설공단

Ⅰ. 목 적

□ 원주∼제천 복선전철사업 콘크리트궤도용 침목 구매발주 계획에 따라 공단 관리기준공정(IPS) 준수 및 안정적인 침목수급을 위하여 입찰공고 전 생산설비 심사를 시행하고 합격한 업체에 한하여 입찰참가자격을 부여함으로 보다 신뢰성 높은 콘크리트침목을 공급 받고자 함

□ 생산설비 심사 및 계약 흐름도

설비심사 신청공고		신청서 접 수		설비심사		구매계약 요 청		입 찰		계약자 선정

Ⅱ. 업체 선정방식

□ 입찰방법 : 지명경쟁 입찰

○ 원주∼제천 복선전철사업 콘크리트궤도용 침목은 우리 공단에서 직접 구매하는 지급자재로서 생산설비 심사에 합격한 업체에 한하여 입찰참가자격을 부여하는 지명경쟁 입찰방법으로 계약자 선정

□ 입찰참가자격

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 조달청 나라장터에 입찰자격을 등록한 업체

② 원주∼제천 복선전철사업 Bi-block침목 업체는 생산설비를 직접 보유한 업체로 한하며, 생산설비의 리스(렌탈포함) 업체는 제외 함.

③ ´14년 수도권고속철도 생산설비심사(궤도처-2367, ´14.07.25)시 합격한 업체는 생산설비심사 면제 및 입찰참가자격 부여

* 단, 생산설비 심사 이후 Bi-block침목 납품실적이 없는 업체는 생산설비 심사시 자격요건 재심사 시행(신청서 접수시)

구 분	납품실적	생산설비 보유여부	비 고 (설비심사)
㈜네비엔	수도권고속철도, 원주∼강릉 1차	직접 보유	면제
㈜삼성산업	수도권고속철도, 원주∼강릉 2차	직접 보유	면제
㈜삼성콘크리트	-	직접 보유	재심사
아이에스동서㈜	수도권고속철도, 원주∼강릉 1차	직접 보유	면제
제일산업㈜	-	직접 보유	재심사
㈜태명실업	수도권고속철도, 원주∼강릉 1차, 2차	직접 보유	면제
티엠트랙시스템(유)	-	㈜태명실업 설비 리스	재심사

Ⅲ. 구매 대상 및 수량

□ 구매대상

품 명	궤도구조 형식			비 고
	시스템명	레일체결장치	레일
Bi-block 침목	KR형	KR형	UIC60	시공사의 PST공법 선정여부에 따라 구매대상 수량은 조정 가능

□ 구매수량 및 수급일정

구 분	2017년							계
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
수 량(개)	4,065	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-	44,065

Ⅳ. 침목 생산설비 심사 신청서 제출 및 작성

□ 신청자격

경쟁입찰에 참가할 수 있는 업체로서 Bi-block침목 생산에 필요한 기본적인 설비를 갖추고 있고, 품질기준에 적합한 제품생산이 가능한 업체(단, 침목 생산설비의 리스(렌탈포함) 업체는 제외)

□ 신청서 제출 마감기한 : 2016년 11월 18일 18:00까지

□ 신청서 작성요령

○『[별첨 1] 원주～제천 복선전철사업 Bi-block침목 생산설비 심사   신청서 작성 및 제출요령』에 따라 정해진 양식을 준수하여 작성

○ 작성서류 용지는 A4(종) 규격 사용

□ 신청서 제출 장소 : 한국철도시설공단 1층 청렴고객지원실

○ 신청서류는 인편, 우편 또는 택배로 제출할 수 있으며, 제출마감일시 이전에 접수 등록된 경우에만 유효하니, 우편 또는 택배로 제출할 경우에는 반드시 ☏042-607-3337(김훈 과장)으로 서류 도착여부 확인

[주소 : (34618) 대전광역시 동구 중앙로 242 한국철도시설공단 기술본부 궤도처(16층)]

Ⅴ. 침목 생산설비 심사

□ 심사방법 및 내용

심사 및 평가는 우리 공단에서 정한『침목 생산설비 심사기준』에 따라 실시하며, 별도의 심사조를 구성하여 공장 실사를 통한 적격여부 판정

○ 주요 심사내용

구 분	생산설비	주 요 내 용
시 설 (제작동)	제작시설	콘크리트 침목 제작에 적합한 구조, 면적, 공간배치, 시설 간 배치 효율성, 조립공정, 시설 간 효율적인 기능
	양생설비	콘크리트 침목의 취급 및 운반의 효율성, 구조, 양생실의 크기, 수량, 증기공급, 습도 조건의 유지 및 조절, 온도조절, 콘크리트 침목의 취급, 운반설비
	재료저장소	적절한 면적, 재료저장 및 관리의 합리성, 생산라인과의 효율적인 연계
	시험실	안전한 시험 공간 및 시험조건에 적합한 환경(실내온도, 습도, 조도 등), 시험공간의 효율적 배치, 시편 보관장소
	보일러실	안전성, 효율성 및 신뢰성이 입증된 중앙조절장치, 보일러 용량, 온도감지, 조절 및 기록 기능, 자동공급관리시스템, 양생설비 및 양생실과의 연계성
콘크리트 및 제작설비	시멘트 저장소 (싸이로)	방습 및 내열설비, 저장용량, 온도계, Screw conveyor상에서 Batch plant와의 효율적인 연계
	배치플랜트	혼합 조절 및 기록 기능을 가진 자동화된 설비, 혼합 조절 기록의 정확도, 설계, 용량, 혼화재료 탱크의 존재 여부
	콘크리트 운반 및 타설	배합설계에 따른 콘크리트 타설 속도 조절시스템, 구조, Belt conveyor system, 콘크리트 살포기 설계, 콘크리트 타설 조절기능, 적정량, 정확도, 개별적 단일 침목 타설 가능성
	탈형설비	공기압, 기계장치 또는 수압으로 작동하는 탈형장치, 구조, 하니의 기계장치로 탈형 전 과정이 수행되는 설계, 침목 탈형 자동감지, 각 침목 탈형 정확도
	진동장비	진동장비의 배치, 진동장비 시스템의 효율성, 주파수, 진폭, 혼합 성능에 따른 진동의 합리성, 구조, 진동시스템의 설계
	양생설비	양생실 구조, 중앙조절식 자동시스템, 온도 및 습도 조절장치, 온기공급 및 온기유지. 온도감지. 온도 조절 및 기록시스템, 보일러실과의 연계, 양생실의 분리

구 분	생산설비	주 요 내 용
시험설비	각종시험장비	품질시험용 장치, 재료시험(골재) 및 콘크리트 시험(물/시멘트 비, 반죽질기, 압축강도, 공기량, 인장강도)용 기구 및 장치, 침목 게이지 시험장치, 레일 기울기 및 비틀림 시험장치, 각 시험기구 장치의 검정 및 인증
저장소	골재저장소	골재저장소의 구조, 면적, 입자 크기별로 분류하여 저장, 배치 플랜트와의 연계
	침목저장소	침목의 취급 및 운반과정에서 침목에 손상을 주지 않는 구조, 지반구조, 장소크기, 적재방법, 취급 및 운반의 안전성, 침목 배치, 인도와의 연계성
운반설비	운반장비	침목의 취급 및 적재 시의 하중이 침목에 손상을 주지 않는 구조, 성능, 수량
기 타	품질시스템	품질 인증서 보유 현황, 사내 품질보증계획서, 기술문서 등

□ 심사기간 : ´16. 11월 24～25(2일간)

* 공단 일정 또는 신청서 접수결과에 따라 변동될 수 있음

□ 심사결과 통보 : 심사완료 후 입찰공고 이전 업체별로 별도 통보(공문 발송)

Ⅵ. 공지사항

□ 금번 침목 생산설비 심사에 합격하는 경우에는 원주～제천 복선전철사업에 소요되는 침목의 구매입찰에 한하여 입찰 참가자격만 부여됨

□ 또한, 우리 공단은 설비심사 신청업체의 침목을 구매해야 하는 의무가 발생하는 것이 아니며, 납품할 수 있는 권리나 권한이 부여하는 것이 아님

□ 생산설비 심사결과 부적격 판정을 받아 입찰참가자격이 주어지지 않는 경우,  또는 적격 판정을 받았으나 낙찰 받지 못하여 납품을 할 수 없는 경우 공단은 이에 따른 책임을 지지 않음.

□ 공단 공사일정 및 구매발주 계획에 따라 구매수량, 수급일정, 업체선정 방식 등이 변경될 수 있으며, 설비심사 신청업체는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음.

□ 설비심사 신청서 작성 및 제출에 따른 비용은 신청자가 부담하며 제출된 신청서는 반환하지 않으며, 제출 마감기한 내에 접수되지 아니한 신청서는 인정하지 않음.

기타 문의 사항이 있을 경우 우리 공단 궤도처(Tel. 042-607-3337)로 문의하여 주시기 바랍니다.

[별첨]

원주~제천 복선전철사업 Bi-block침목 생산설비심사 신청서 작성 및 제출 요령

2016. 11.

한국철도시설공단

[별표 1]

원주~제천 복선전철사업 Bi-block침목 생산설비 심사 신청서
생산설비 심사 참여 신청업체	법 인 명		법인등록번호
	성명(대표자)		생년월일
	주소(본사)
	담당자 성 명		전화번호
			e-mail
구 비 서 류	1. 신청서(별표1. 서식) 2. 침목 생산공장 현황(별표2. 서식) ① 소재지 주소 ② 부지면적 ③ 조직도 ④ 업무분장표 ⑤ QC 공정도 ⑥ 사내 표준(절차서, 지참서 등도 포함) 목록 ⑦ 최근 3년간 PC제품 생산품목 현황 3. 주요 생산설비 및 장비(시험장비 포함) 보유 현황(별표3. 서식) 4. 종업원 현황(별표4. 서식) ① 전 종사원 ② 품질관리 종사원 5. 품질,안전,환경관련 인증서 현황(별표5. 서식) 6. 사업자 등록증(별표6. 서식)
한국철도시설공단 『원주~제천 복선전철사업 Bi-block침목 생산설비 심사 신청공고』에 따라 위와 같이 생산설비 심사를 신청합니다. 2016년 월 일 신청인 : (인) 한국철도시설공단 이사장 귀하

[별표 2]

2. 침목 생산공장 현황

① 소재지 주소

-

② 부지면적

-

③ 조직도

-

④ 업무분장표

-

⑤ QC 공정도

-

⑥ 사내 표준(절차서, 지참서 등도 포함) 목록

-

⑦ 최근 3년간 PC(프리캐스트) 콘크리트 제품 생산품목 현황

- 최근 3년간 PC제품 생산 현황(콘크리트 침목 포함)

- 품명, 규격, 수량, 납품처 등 기입

[별표 3]

3. 주요 생산설비 및 장비(시험장비 포함) 보유 현황

설비(장비)명	규 격	수 량	주요 기능 및 성능 설명

[별표 4]

4. 종업원 현황

① 전 종사원

경력	중역	행정직	기 술 직					합계
			대졸이상	전문대졸	고졸	기타	소계
4년이상
3년이상
1년이상
1년미만
합 계

② 품질관리 종사원

구 분	기 사 1～2급	기능사 1～2급	경력5년	경력3년	비 고
건설재료시험

[별표 4]

5. 품질,안전,환경관련 인증서 현황

- KS, KS, ISO 등

- 뒷장에 증빙서류(인증서 사본) 첨부

[별표 5]

6. 사업자 등록증

- 증빙서류(등록증 사본) 첨부