2023년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2023-12

담당부서

작성자

(건설본부/토목설계처)

(심희재/042-607-4573/10001966@kr.or.kr)

(건설본부/고속일반철도처)

(강수영/042-607-3485/7531ksy@kr.or.kr)

정 책 명

인덕원~동탄 복선전철 건설사업

사업개요

및

추진경과

ㅇ 노선도

ㅇ 사업개요

- 사업목적 : 수도권 서남부지역의 광역교통기능 확충으로

광교·영통·동탄2신도시 등 대규모 택지 개발에

따른 교통체증 해소

- 사업기간 : 2015년 ~ 2026년

- 총사업비 : 2조 8,137억원

ㅇ 주요내용

- T/K 2개 공구 착공, 기타 10개 공구 실시설계 중

ㅇ 추진경과

- ‘11. 4. ∼ ’11.11. : 예비타당성조사

- ‘12. 3.           : 기본계획 착수(’12. 10 중지)

- ‘12.10. ∼ ’14.11. : 타당성 재조사

- ‘18. 3.          : 기본계획 고시(국토교통부 제2018-181호)

- ‘18. 9. ~ `20. 2.  : 노반 기본설계

- ‘19. 7. ~ ’21. 1.  : T/K구간(1, 9공구) 실시설계

- ‘20. 5. ~ 현재    : 기타공사 구간 실시설계 시행 중

- ‘21. 4. 26        : T/K 1, 9공구 공사 계약 체결 및 착수

- ‘21. 10. 27       : T/K 1, 9공구 사업실시계획승인

(국토교통부 제2021-1193호)

- ‘22. 9. ~         : 사업계획 적정성 재검토(KDI)

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
건설본부	손병두	본부장	ˊ22.8.29∼현재	건설본부 사업 업무 총괄
	김종호	실장	ˊ22.9.1∼현재	설계실 사업 업무 총괄
	이명석	처장	`22.9.26∼현재	설계 사업 업무 총괄
	안희철	부장	`20.05.29∼현재	충청권 설계업무 총괄
	한상연	처장	`19.02.25∼현재	일반철도처 업무 총괄
	이규삼	부장	ˊ20.01.29∼현재	사업PM1부 업무 총괄
수도권본부	손병두	본부장	`22.01.17∼현재	수도권본부 업무 총괄
	고병찬	단장	`22.01.17∼현재	수도권사업단 업무 총괄
	강영석	부장	`22.01.17∼현재	인덕원~동탄 PM 총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 국토교통부 : 철도투자개발과장 정수호, 담당사무관 김용래

ㅇ 턴키구간(착수)

공구	1공구	9공구
감리단	㈜대한콘설탄트	㈜삼보기술단
시공사	에스케이에코플랜트	㈜한화건설

ㅇ기타구간(용역 일시중지)

공구	2공구	3공구	4공구	5공구	6공구
설계사	㈜대한콘설탄트 등	㈜제일엔지니어링 등	㈜동부엔지니어링 등	㈜이산 등	㈜동일 등
공구	7공구	8공구	10공구	11공구	12공구
설계사	㈜유신 등	㈜동명기술공단 등	㈜동해종합기술공사 등	㈜삼안 등	㈜태조엔지니어링 등

추진실적

ㅇ ‘20. 2.  : 노반 기본설계 완료

ㅇ ‘21. 1.  : 턴키구간 실시설계 완료

ㅇ ‘21. 4.  : 턴키구간 공사 착수

ㅇ ‘22. 9. ~ : 사업계획 적정성 재검토(KDI)