보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2018. 7. 9.(월)	총 매수 3매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 건설본부 일반철도처 / 처장 기인도, 건축PM부장 김영성 (042-607-3322)
7월 8일(일) 뉴스1, 중도일보 등에서 보도한 <제천역사 신축현장 ‘소음 갈등’ 시끌> 보도내용에 대해 아래와 같이 알려드립니다.

□ <‘제천역사 신축공사’ 현장 인근 주민들과 상인들이 소음 피해를 호소하며 불만을 터뜨리고 있다>는 보도내용에 대하여,

○ 철도공단은 제천역 신축공사 착수 전(’17년 9월)에 관할 기관인 제천시와 항타기 등 건설장비 사용계획, 공사기간, 소음·진동 방지방법에 대해 사전 협의하여 EGI 휀스를 설치하였음.

- EGI휀스는 보행자의 통행안전 확보가 용이하고, 방음·방진기능이 있으며, 일반적인 공사 현장에 사용되는 것으로 제천역사 신축현장에는 2.4M 높이로 설치됨.

※ EGI휀스 : 보행자의 통행 안전, 사고방지 및 방음·방진을 위한 일반적인 시설 자재

(규격 : 길이 1.8M/2.0M/2.4M/3.0M, 폭 54CM, 두께 0.5∼0.8T, 연장 802m)

○ 또한, 최근 소음 발생 우려가 높은 공정(지열 천공)에 대한 소음 측정결과(6월 26일·7월 5일, 2회) 공사장 생활소음 기준치(65dB) 이하로 측정되었음

※ 소음측정 결과 : 최대 62.5 dB, 최소 57.4dB

□ 앞으로 철도공단은 ‘원주∼제천 복선전철사업’에 따른 지역주민들의 소음 또는 먼지 등의 생활불편이 최소화될 수 있도록 건설현장 관리에 최선을 다하겠음.

참 고		원주~제천 복선전철 제천역사 공정 추진현황

조감도	전경사진(‘18. 7월 현재)

□ 공사개요

○ 위    치 : 충청북도 제천시 의림대로 1(영천동 1381) 일원

○ 대지면적 : 41,199㎡

○ 역사규모 : 역사(3층) 3,163㎡, 통합사무소(3층) 2,494㎡, 연결통로 1,161㎡

○ 공사기간 : 2017년 8월24일 ∼ 2019년 2월14일

○ 공사금액 : 22,071백만원

○ 건설사업단 : ㈜서한종합건축사사무소

○ 시 공 사 : 계룡건설산업(주) 외 2개사

□ 주요공정 추진 현황(현재 공정율 : 20%)

○ 2017.08.24. : 공사계약

○ 2017.11.30. : 가설휀스 설치 완료

○ 2018.01.06. : 기존 제천역사 철거 완료

○ 2018.02.28. : 각종 지장물 철거 철거 완료

○ 2018.03.14. : 기초파일 시공 완료

○ 2018.03.22. : 기초 골조공사 완료

○ 2018.07.05. : 1, 2, 3층 바닥 골조공사 완료

○ 2018.07.07. : 1층 벽체 설치 작업 중