보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2022. 6.27. (월)	총 매수 4매
	배포부서 홍보실 (042-607-3084)
담당부서 충청본부 충청권사업단 / 단장 한승우, 사업총괄부장 김인웅 (042-607-5111)
충청권 7개 철도사업에 올해 1조 992억원 투입 - 경부고속2단계 대전북연결선 등 2개 신규사업 포함 -

□ 국가철도공단(이사장 김한영)은 올해 충청권 7개 고속·일반철도 건설 사업에 1조 992억원을 투입한다고 27일(월) 밝혔다.

ㅇ 고속철도는 경부고속철도2단계 대전북연결선 1개 사업이며, 일반철도는 서해선(홍성～송산) 복선전철, 이천～문경 단선전철, 포승～평택 단선전철, 장항선 복선전철, 장항선 개량 2단계, 대전차량기술단 인입철도 등 6개 사업을 추진한다.

【올해 충청권 2개 철도 건설사업 착공】

□ 7개 사업 중 올해 신규 착공하는 사업은 경부고속철도2단계 대전북연결선과 장항선 복선전철 개량 2단계 등 2개 사업이다.

ㅇ 경부2단계 대전북연결선은 곡선이 심한 대전 도심 북측 통과 구간의 선형 개량을 위해 고속전용선 5.96km를 건설하는 사업으로 올해 사업비 547억원이 투입되며 2025년말 개통 예정이다. 사업이 완료되면 경부고속철도 전 노선이 고속 전용선으로 운행되어 열차 안전성 확보와 속도 향상, 승차감 개선 등이 기대된다.

ㅇ 장항선 개량 2단계(신성～주포) 사업은 충남 홍성군에서 충남 보령시까지 18.8km 구간 신설을 통한 선형 개량사업으로 올해 사업비 894억원이 투입되며 2026년 개통 예정이다. 장항선은 향후 서해선과 호남선, 전라선과 연계해 서해축 고속철도망을 구축하고 여객과 화물 운송효율 제고로 서해안권 지역개발을 촉진할 것으로 기대된다.

【일반철도 5개 사업에 9,551억원 투입】

□ 충청권 일반철도 사업은 서해권과 중부내륙권 노선 구축을 위해 서해선 복선전철 등 5개 사업이 진행 중이며, 올해 9,551억원이 투입된다.

□ 서해선 복선전철은 충남 홍성에서 경기도 송산까지 90.01km를 연결하는 사업으로 올해 사업비 3,571억원이 투입된다. 현재 공정율은 85.2%이며 오는 8월 노반공사를 완료하고 후속 분야를 본격 추진할 예정이다.

ㅇ 사업이 완료되면 시속 260km급 고속열차가 투입되어 홍성에서 송산까지 40분 만에 주파 가능하며 신산업단지로 성장하고 있는 서해안 지역 교통수요를 해소할 수 있을 것으로 기대된다.

□ 이천～문경 철도건설 사업은 지난해 12월 개통한 이천～충주 구간(54km)에 이어 후속 구간인 충주에서 문경까지 39.2km 구간을 건설한다. 올해 가장 많은 사업비 4,359억원이 투입되며 현재 공정율 78.6%로 순항 중에 있다.

□ 포승～평택 철도사업은 포승에서 평택간 30.4km를 연결하는 사업으로 3단계로 나누어 진행된다. 1단계(평택～숙성) 13.4km 구간은 지난 2015년 완공하였으며 2017년 착공한 2단계(안중～숙성) 7.9km 구간은 현재 궤도 공정이 진행 중이다. 2단계 구간 개통은 2024년이며 3단계(포승～안중) 9.1km 구간은 제4차 전국항만기본계획에 따라 향후 추진 예정이다.

□ 장항선 복선전철은 충남 아산시 신창면에서 전북 군산시 대야면 까지 118.6km를 연결하며 열차 운영 효율성 확보를 위해 단계별로 순차 개통한다.

ㅇ 신창에서 홍성 1단계 구간은 현재 궤도·건축·시스템 공정이 원활하게 진행 중이며 2024년 개통 예정이다. 홍성에서 대야 까지 이어지는 2단계 구간은 2026년 개통을 목표로 전 분야 설계 중에 있다.

□ 대전차량기술단 인입철도 이설 사업은 신탄진역에서 국도17호선과 평면교차하는 기존 인입철도를 철거하고 회덕역에서 철도차량기술단까지 인입철도 2.5km를 새로 건설한다. 올해 사업비 60억원이 투입되며 2025년 완공 예정이다. 그동안 도심 구간을 분할하던 철도가 이설되면 주민 불편을 야기해 왔던 교통 정체와 사고 위험 등이 해소될 전망이다.

□ 김용두 충청본부장은 “충청권 철도건설 사업을 통해 안전 취약구간과 교통 불편을 해소하고 열차 운행속도 향상으로 철도의 경쟁력을 강화해 나가겠다.”고 밝혔다.

□ 김한영 이사장은 “올해 충청권 철도예산 1조 992억원을 효과적으로 집행하여 지역경제 활력 제고와 일자리 창출에 기여하고, 충청권이 수도권에 준하는 메가시티로 도약할 수 있도록 예정된 철도 사업을 차질없이 추진하겠다.”고 말했다.

참고1	충청권 철도건설 사업 추진현황

서해선 복선전철사업을 포함하여 고속·일반철도 7개 사업 공사를 추진 중이며 총사업비 약 17조 4천억 원 투입

□ 충청권 관내 건설사업 현황

ㅇ 예산집행 현황 및 계획

- ‘21년까지 14조 2,508억 원 집행하였으며, ‘22년에는 1조 992억 원 집행 계획이며, 상반기까지 6,804억원(‘22년도 계획대비 61.9%) 집행예정

(단위 : 억원)

사 업 명	사업기간	총사업비	기투입	‘22년 예산	‘23년 이후	비고
합 계		173,409	142,508	10,992	19,909
서해선 복선전철	‘09~’24	41,487	34,720	3,571	3,196
이천~문경 철도건설	‘05~’24	25,237	19,548	4,359	1,330
포승~평택 철도건설	‘07~’30	7,153	4,533	321	2,299
장항선 복선전철	‘18~’26	7,429	1,678	1,240	4,511
장항선 개량2단계	‘10~’26	9,065	3,433	894	4,738
경부고속 2단계	‘02~’25	82,470	78,572	547	3,351
대전차량기술단인입철도	‘18~’25	568	24	60	484

참고2	2022년도 추진계획

전 국토의 반나절 생활권 실현, 국민 교통편의 증진 및 지역균형 발전을 위해 ▴지역경제 활성화 사업 집중 추진 ▴완공사업 적기 개통의 전사적 노력 ▴신규 사업의 성공적 안착 및 본격공사 시행

□ 사업별 추진계획

ㅇ 서해선 홍성~송산간 복선전철[L=90.0km, ‘24년 개통 예정]

* 노반 본선공사 완료(’22.8월) 및 후속분야 본격 추진

ㅇ 이천~문경 철도건설[L=93.2km, ‘24년 개통(2단계) 예정]

* 1단계(이천∼충주, L=54km)구간 : ’21.12월 개통

* 2단계(충주∼문경, L=39.2km)구간 : 노반공사 계속 추진, 후속분야 착공

ㅇ 포승~평택 철도건설[L=30.4km, ‘24년 개통(2단계) 예정]

* 1단계(숙성∼평택, L=13.4km)구간 : ’15.2월 개통

* 2단계(안중∼숙성, L=7.9km)구간 : 노반 및 후속분야 공사 계속 추진

* 3단계(포승∼안중, L=9.1km)구간 : 제4차 전국항만기본계획에 따라 '30년 매립 후 공사예정

ㅇ 장항선 복선전철	신창~대야[L=118.6km, `26년 개통 예정]
	신창~홍성[L=36.35km, `24년 개통 예정]

* 1단계(신창∼홍성, L=36.35km)구간 : 궤도 및 건축분야 완료, 시스템분야는 ‘23.3월 완료 예정

* 2단계(홍성∼대야, L=82.25km)구간 : 전 분야 설계 중

ㅇ 장항선 개량2단계(신성~주포)[L=18.8km, ‘26년 개통 예정]

* ’22년 4월 노반공사(2개 공구) 계약 체결, ‘22년 노반공사 본격 추진

ㅇ 경부고속철도 2단계 대전북연결선[L=5.962km, ‘25년 개통 예정]

* ’21년 10월 노반공사(T/K 2개 공구) 계약 체결, ‘22년 노반공사 본격 추진

ㅇ 대전차량기술단 인입철도 이설사업[L=2.555km, ‘25년 개통 예정]

* ’21년 11월 노반공사(단일공구) 계약 체결, ‘22년 노반공사 본격 추진

참고3	충청권 철도건설 사업현황

□ 서해선(홍성~송산) 복선전철

DL

DL

ㅇ 사업내용 : 서해선 홍성～송산간 복선전철 건설(L=90.0km)

ㅇ 사업기간 : 2009년～2024년

ㅇ 사업효과 : 충남 홍성군 홍성읍∼경기 화성시 송산면간 서해선 철도연결로 수송시간 단축 및 지역개발 촉진(선로용량 : 130회/일, 편도)

□ 이천∼문경 철도건설

111

112

221

222

부발

광주

수서

판교

여주(원주)

312

313

311

봉양

조치원

충북선

경강선

이천~문경 철도건설사업

이천~충주 ‘21.12월 개통

거제

314

김천

기본계획중

(신호장)

충주

예타중

‘23.12월 개통

ㅇ 사업내용 : 이천∼문경간 단선전철 건설(L=93.2km)

ㅇ 사업기간 : 2005년∼2024년

ㅇ 사업효과 : 충북 및 경북 내륙지역 부존자원 개발 및 지역발전 도모

□ 포승~평택 철도건설

ㅇ 사업내용 : 포승～평택 간 단선전철 건설(L=30.4km)

ㅇ 사업기간 : 2007년～2030년

ㅇ 사업효과 : 아산만권 광역개발사업 추진에 따른 평택항과 배후공단의 급증하는 물동량의 효율적 처리

□ 장항선 복선전철

【‘26.12월 개통】

【‘23.10월 개통】

【‘08.12월 完了】

ㅇ 사업내용 : 장항선 신창～대야간 복선노반단선→복선전철화(L=118.63km)

ㅇ 사업기간 : 2018년～2026년

ㅇ 사업효과 : 경부선과 호남선의 교통량 분산, 서해안축 물동량 증가 및 수송수요 증가에 따른 선로용량 부족 해소

□ 장항선 개량2단계

【‘21.1월 完了】

【‘26.12월 개통 예정】

ㅇ 사업내용 : 장항선 개량2단계 단선 비전철(L=33.0km)

ㅇ 사업기간 : 2010년∼2026년

ㅇ 사업효과 : 서해선, 전라선, 익산∼대야 복선전철 사업과의 연계로 운송효율 증대 및 철도서비스 향상(선로용량 : 35회 ⇒ 41회/일, 편도)

□ 경부고속철도 2단계 건설사업[대전북연결선, 대전도심]

ㅇ 사업내용 : 경부고속철도 임시선을 전용선으로 건설(L=5.962km)

ㅇ 사업기간 : 2002년～2025년

ㅇ 사업효과 : 안전취약개소 해소로 열차안전운행 확보 및 선로유지보수비용 절감

□ 대전차량기술단 인입철도 이설사업

ㅇ 사업내용 : 기존 인입선 철거 및 신설(L=2.555km)

ㅇ 사업기간 : 2018년～2025년

ㅇ 사업효과 : 국도17호선 평면교차로 인한 교통불편 및 지역단절 해소