서해선 복선전철 공정률(22년 2월말 기준)

분야		공정률(%)
계		83.7
설계		49.4
감리		58.9
용지		95.7
노반	1공구	99.3
	2공구	95.8
	3공구	99.5
	4공구	96.4
	5공구	99.2
	6공구	98.7
	7공구	99.5
	8공구	93.9
	9공구	93.1
	10공구	88.2
	기타	78.3
	소계	93.8
궤도		72.0
건물		74.0
전력		50.6
통신		24.5
신호		33.7
차량기지		58.4
부대		57.6