경춘선 노반, 건축분야 공정율 현황

□ 총체 공정률 : 73.6%

2009.11월말 기준

구 분	공 정 율(%)								비 고
	1공구	2공구	3공구	4공구	5공구	6공구	7공구	8공구
노 반	67.5	72.6	준공	87.8	92.2	92.0	80.7	80.0

구 분	공 정 율(%)								비 고
건 축	갈매	퇴계원	사릉	금곡	평내호평	마석	대성리	청평
	노반공사중	노반공사중	14.9	3.6	준공	영업이전완료	22.0	영업이전완료
	상천	가평	경강	백양리	강촌	김유정	남춘천	춘천
	0.5	12.0	2.0	0.3	15.0	2.3	0.8	0.1