2024년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2024-21

담당부서

작성자

(시스템본부/제2관제부)

(황유정/042-607-3197/10004493@kr.or.kr)

정 책 명

제2철도교통관제센터 구축

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 現철도교통관제센터(‘06년, 구로)는 18년간의 운영으로 인해 시스템이 노후 되어 있고, 제4차 국가철도망 구축사업 등의 지속적인 철도망 구축으로 용량이 포화 상태임

- 비상시를 대비하여 운영 중인 예비관제실(대전)은 구로교통관제센터의 약 10% 규모밖에 되지 않아 백업기능 수행에 한계가 있음

- 이에, AI(인공지능), 빅데이터 등 4차 산업혁명 기술을 도입하여 관제 시스템 기능을 고도화하고, 새로운 노선 증설에 대비하기 위해 제2철도교통관제센터 구축을 추진

○ 추진기간 : 2021 ∼ 2026년

○ 총사업비 : 3,769억원

○ 주요내용

- 제2철도교통관제센터 관제시스템 구축사업

* 관제시스템 제작 및 설치 1식, 철도교통관제센터와 인터페이스 등

○ 추진경과

- 2018.01. : 철도교통관제 중장기 발전전략 수립

- 2018.12. : 철도관제시스템 고도화 기본계획 수립

- 2019.01. : 제2관제센터 입지선정위원회 개최

- 2019.04. : 제2관제센터 건설사업 예비타당성 면제 심의 완료

- 2020.10. : 제2관제센터 건설사업 사업계획적정성 검토완료

- 2022.06. : 기본계획 고시

- 2023.04. : 사업실시계획승인

- 2023.12. : 제2철도관제센터 관제시스템 구축 계약 체결

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
시스템본부	구욱현	본부장 (직무대행)	‘23.7.17.~현재	시스템본부 사업 업무 총괄
	송종수	처장 (직무대행)	‘24.1.8.~현재	신호처 사업 업무총괄
	박지하	부장	‘21.1.2.~현재	제2관제 구축사업 업무 총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 국토부 철도국 : 철도운행안전과장 하창훈, 사무관 김정현

○ 대아티아이 콘소시엄(사업시행자)

- 대아티아이(주), KT, ㈜세화

추진실적

○ 2018.01. : 철도교통관제 중장기 발전전략 수립

○ 2018.12. : 철도관제시스템 고도화 기본계획 수립

○ 2019.01. : 제2관제센터 입지선정위원회 개최

○ 2019.04. : 제2관제센터 건설사업 예비타당성 면제 심의 완료

○ 2020.10. : 제2관제센터 건설사업 사업계획적정성 검토완료

○ 2021.04. : 제2관제센터 건설 및 시스템 고도화 추진계획(안)

○ 2022.06. : 기본계획 고시

○ 2022.12. : 건축분야 기본 및 실시설계 착수

○ 2023.01. : 관제시스템 상세설계(ISMP) 완료

○ 2023.04. : 사업실시계획 승인

○ 2023.08. : 제2관제센터 관제시스템 입찰공고

○ 2023.12. : 제2철도관제센터 관제시스템 구축 계약 체결