2024년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2024-06

담당부서

작성자

(건설본부 / 고속일반철도처)

(박혜성/042-607-3914/hspark1234@kr.or.kr)

정 책 명

중앙선 도담∼영천 복선전철 건설사업

사업개요

및

추진경과

ㅇ 노선도

복선전철 L=73.8㎞

단선전철(복선노반) L=71.3㎞

ㅇ 사업개요

- 사업목적: 중앙선 노선과 연계, 수송시간 단축 및 국토균형발전 촉진

ㅇ 사업기간: 2010∼2025년

ㅇ 총사업비: 4조 3,22,296백만원

ㅇ 주요내용

- 중앙선 도담∼영천간 단선 → 145.1km 복선 전철화

ㅇ 추진경과

- 2009. 12. ∼ 2010. 6.	: 예비타당성조사(B/C 0.8, AHP 0.557)

- 2010. 9. ∼ 2011. 12.	: 타당성조사 및 기본계획(B/C 0.86)

- 2012. 4. 3.	: 기본계획 고시

* 국토해양부고시 제2012-152호

- 2012. 10.	: 턴키공사 발주(1,2,6,11공구)

- 2012. 11. 28.	: 노반 기본 및 실시설계 착수

- 2013. 11. ∼ 2014. 1.	: 6공구(턴키구간) 공사 착수

- 2014. 12. 10.	: 노반 기본 및 실시설계 준공

- 2014. 12. 29.	: 11공구(턴키구간) 공사 착수

- 2015. 1. 2.	: 사업실시계획 승인(도담∼안동 구간)

* 국토교통부고시 제2014-884호

- 2015. 5. ∼ 2015. 11.	: 도담∼안동구간 기타공사 착수

- 2016. 1. 7.             : 사업실시계획 승인(안동∼영천 구간)

* 국토교통부고시 제2015-1106호

- 2018. 6. ∼ 2018. 11.   : 도담∼안동 구간 궤도, 시스템분야 착공

- 2020. 12. 23.           : 단양∼안동간 하선 부분개통(복선 중 단선)

- 2022. 7.	: 단양∼영주∼안동 복선개통(150km/h)

- 2022. 12.	: 안동∼영천 복선화 궤도, 시스템 분야 착공

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
본사 건설본부	손병두	본부장	’22.8.29.∼현재	건설본부 소관사업 업무총괄
	한상연	처 장	’23.1.18.∼현재	고속일반철도처 소관사업 업무총괄
	황지광	부 장	`23.1.18.∼현재	강원권부 소관사업 업무총괄
지역 강원본부	양인동	본부장	‘22.1.17.∼현재	강원본부 소관사업 업무총괄
	장동삼	단 장	‘22.9.26.∼현재	강원권사업단 소관사업 업무총괄
	박윤식	부 장	‘22.1.2.∼현재	토목3TF부 소관사업 업무총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

국토교통부
철도건설과장	오송천	담당사무관	김은철

ㅇ 공구별 업체 현황

구 분	제1공구	제2공구	제3공구	제4공구
시공사	현대건설(주)	SK건설㈜	대림산업㈜	HDC현대산업개발㈜
감리사	㈜이산		㈜동명기술공단
구 분	제5공구	제6공구	제7공구	제8공구
시공사	HDC현대산업개발㈜	대림산업㈜	한신공영㈜	남광토건㈜
감리사	㈜서현		㈜태조
구 분	제9공구	제10공구	제11공구	제12공구
시공사	㈜포스코건설	금호산업㈜	㈜포스코건설	한신공영㈜
감리사	㈜천일		㈜유신

추진실적

ㅇ 2013. 11. ∼ 2014. 12. : 턴키공사 착공(제1, 2, 6, 11공구)

ㅇ 2015. 5. ∼ 11.       : 기타노반공사착공

* 도담∼안동 5월, 안동∼영천 11월, 8개 공구

ㅇ 2015. 12. 31.          : 사업실시계획 승인(안동∼영천구간 추가)

ㅇ 2021. 12.              : 안동∼영천 복선전철화 총사업비 반영

ㅇ 2022. 7.                : 단양∼영주∼안동 복선개통(150km/h)

ㅇ 2022. 12.                : 안동∼영천 복선화 궤도, 시스템 분야 착공