경춘선 화접천교 등 51개소 내진성능평가 및 실시설계 용역

특정공법(자재) 심의 대상 공모

2025. 12.

I		사업개요

□ 사업목적

ㅇ「지진·화산재해대책법」제15조(기존 시설물의 내진보강기본계획 수립 등) 및 같은 법 제16조(기존 시설물의 내진보강 추진 등)에 의거 일반철도 교량에 대한 내진성능평가 결과에 따라 내진보강 실시설계 실시

□ 사업내용 및 기간

ㅇ 사업기간 : 2022년 03월 15일 ~ 2026년 08월 31일

ㅇ 사업내용

- 경춘선 화접천교 등 51개소 내진성능평가 및 실시설계

대상 시설물

경춘선	화접천교 등 3개소
교외선	녹양천교 등 13개소
경부선	용산과선철도교 등 11개소
중앙선	덕소천교 등 6개소
경의선	연세가도교 등 4개소
경원선	신탄천교 등 2개소
일산선	지축고가교 등 2개소
고양기지선	출고선교량 등 2개소
기타	고척고가교 등 8개소

※ 경춘선 등 9개 노선 교량 51개소 (수도권 30개소, GTX 21개소)

□ 추진경위

ㅇ `22. 03월 : 내진성능평가 및 실시설계 착수

ㅇ `22. 12월 : 내진성능평가 시행 및 보완

ㅇ `23. 12월 : 내진보강 설계 실시설계 시행

ㅇ `24. 06월 : 내진성능평가 완료

ㅇ `25. 03월 : 전단키 적용성 검토 보고

ㅇ `25. 10월~11월 : 특정공법 시장 조사

Ⅱ		공모 대상공종 및 물량

□ 대상공종

ㅇ 특정공법 심의대상(매뉴얼 25개 공종 규정) 중 의무대상 외 기술적 변별력 있는 우수공법(자재, 앵커형 전단키)으로 중소기업 기술마켓에 2개 이상 기술이 등록된 공법

* 중소기업기술마켓 활성화 방안(실용화연구처-2553, 24.09.20)

□ 대상물량

구간	교량명	상부	받침	연장	준공	설치 개소	비고
경의	중리천입체통로교 (출발)	RCS+PF	선+면 +스페리칼	37.8	1986	100	1평가군
일산	지축고가교	PSCI+RCT +RA	탄성 +스페리칼	800.0	1995	112	1평가군
일산	대곡고가	PSCI+RA	스페리칼	349.0	1995	22	1평가군
교외	원당가도교	PSCI+STB	선	381.9	1986	39	1평가군
고양기지	출고선교량 (화전고가5교)	PSCI	스페리칼	550.0	2003	14	1평가군
고양기지	입고선교량	PSCI	스페리칼	525.0	2003	83	1평가군
중앙	오빈교	PSCI+STB	스페리칼	840.0	2010	98	1평가군
중앙	삼성제1교	PSCI+STB	스페리칼	725.1	2010	57	1평가군
경춘	화접천교	SPG	선	70.0	1938	14	1평가군
경춘	조종천1교	STB +중로ARCH	스페리칼 +포트	590.0	2009	5	1평가군
경춘	조종천3교	STB	스페리칼	540.0	2009	25	1평가군
경부	사촌천교	SPG+PF	선+면진	89.3	1995	51	2평가군
경인	고척고가교	PSCI+RCT +RA	스페리칼	1,022.1	1996	56	2평가군
분당	죽전천교	PSCI+PF	스페리칼 +선	359.0	1994	62	2평가군
분당	탄천교	PSCI	선	114.5	1994	134	2평가군
합 계				6,567.6		872

* 물량은 상세 설계과정에서 변경될 수 있음

□ 특정공법(자재) 평가군 배분(안)

ㅇ 시공물량 및 관리지역본부 등을 고려 2개 평가군으로 배분

- 참여업체는 2개 평가군 모두 지원가능(중복가능)

- 1차 평가 기준에 따라 평가군별 6개 특정공법(자재) 선정 후 최종 특정공법 기술심의 시행

구 분	1평가군	2평가군
교량명	지축고가교 등 11개교	사촌천교 등 4개교
연장(m)	5,454	1,583
앵커(EA)	569	303
금액(백만원)	1,356	775

□ 유의사항

ㅇ 현장설명회 참석 업체에 한하여 참여의향서 제출이 가능하며 관련 서류 등 안내사항을 이메일로 별도 송부 예정

ㅇ 제출한 자료가 사실과 다를 경우 공법 선정이 취소될 수 있음

ㅇ 단계별 평가 진행(1차 평가, 숏리스트 선정, 최종 평가 등)을 위하여 제출된 각종 증빙서류(대표자, 자회사․그룹사 등의 관계 확인서류, 특허권 및 신기술 등 권리관계 확인서류, 장비 실보유현황 확인서류, 공인기관 인증서류 등)중 평가에 영향을 미치는 내용이 사실과 다르거나 누락된 것이 확인될 경우 공법 선정이 취소될 수 있음

ㅇ 실질적 동일회사(동일 대표, 자회사․그룹사 등)가 보유한 다수 특정자재를 각 평가군에 동시 지원하는 경우 역시 동일 자재로 간주, 추후 중복지원이 확인될 경우 공법 선정이 취소될 수 있음(실질적 동일회사 보유 공법의 숏리스트 중복선정 배제)

ㅇ 특허 전용·통상실시권자와 신기술 사용협약자는 특허권자 또는 신기술 보유자의 특허·신기술 사용 동의서를 제출하여야 하며,

- 공단과의 협약 체결 후 해당공종의 공사완료 이전에 특허권자 또는 신기술 보유자와의 사용협약 기간(특허 전용․통상실시권자, 신기술 사용협약자 限) 등이 만료되는 경우에는 특허 또는 신기술로 불인정하며 평가 대상에서 제외(결격처리)

ㅇ 안내자료 상의 공사 물량 등은 추후 설계 진행에 따른 심의과정, 관계기관 협의, 사업추진형태 등에 따라 물량 등이 변경될 수 있음

ㅇ 특허공법(자재)과 관련하여 타 회사와의 분쟁이 있는 경우 제척처리

ㅇ 사전 시장조사 시 제출된 가격보다 2%이상 증액된 경우 해당업체는 평가에서 제척 처리(결격처리)

□ 지원 방법

ㅇ 현장설명회 참석 업체에 한하여 참여 공문(참여의사 확인서 포함)을 2026. 1. 2.(금) 17:00까지 아래 담당자 이메일로 제출

(누락 방지를 위해 공단 및 설계사 사업 담당자에게 동시 제출 必)

구 분	담 당 자	사무실	E-mail
자료 제출처	공단 인프라기술처 김선기 차장 공단 인프라기술처 박관용 과장 설계사 강종호 전무	042-607-4496 042-607-4497 010-2809-5469	qaz1580@kr.or.kr parky0919@kr.or.kr kajabi@teso.co.kr

※ 참여의사 확인서를 제출 후 꼭 담당자에게 연락하여 제출여부 확인 必

※ 업체명, 공종, 심의대상 특정공법, 보유 공법의 명칭, 특허권 기간 등을 정확히 기재

※ 제출여부 미확인에 따른 누락의 책임은 참여사에 있음

ㅇ 현장 설명회

- (일시) ‘25.12.22.(월) 10:30(시간 준수, 지연참석시 참여불가)

- (장소) 국가철도공단 수도권본부 강당(3층)

* 참석시, 신분증, 위임장, 재직증명서 등 필히지참(미지참시 참여불가)

Ⅲ		1차 평가 및 숏리스트 선정 기준 등

□ 숏리스트 선정 방안

1) 선정기준

ㅇ 1차 평가 결과 점수가 높은 순으로 숏리스트(6개 이하) 구성

ㅇ 1차 평가 참여업체가 6개 이하인 경우 모두 참여

ㅇ 결격사유(특허권 기간, 전용․통상실시권 등)가 있는 경우 제척

2) 숏리스트 구성을 위한 1차 평가 시 동점 처리 방안

ㅇ 참여의향서 제출 공법을 대상으로 1차 평가 시행 및 순위 결정 과정에서 동점 공법 발생할 경우, 1차 평가 기술평가 항목순으로 공법 순위 차등 결정

(구조안전성 → 시공성 → 유지보수성 → 생애주기비용 순으로 가중치 반영)

* 각 사별 신용도 평가 지표 및 배점표 참조

ㅇ 동점 공법간 모든배점이 동일할 경우, 해당 특허 및 신기술 유효기간의 적정성(사업기간 내 만료유무 등), 여유 기간 등을 기반으로 공법 순위 차등 결정

□ 1차 평가 항목 및 배점

구 분		평 가 항 목	배 점
가격평가(20점)	기업신용평가(20점)	행정안전부 예규 준용	20
기술평가(80점)	①구조안전성(27점)	공인인증기관 성적표 (성능시험 및 품질시험 적용 여부)	10
		실물모형실험 (완제품 성능시험)	9
		구조 안전평가 (전산해석을 통한 안전성 평가)	8
	②시공성(27점)	전단키 중량 (협소공간 시공성 향상)	27
	③유지보수성(13점)	유지관리효율성	6
		자재수급 용이성	7
	④생애주기비용(13점)	LCC분석 보고서 제품 내구년한	6
		LCC분석 보고서 종합 분석점수	7
총 계			100
가점(3점)		건설신기술 등재(+3점)	3

Ⅳ		최종 평가

최종 평가 : 기술평가(80점) + 가격평가(20점) + 건설 신기술(3점)

□ 기술평가(80점)

ㅇ 공단 특정공법위원회에서 의결된 평가항목 및 배점을 적용하여 평가 시행(심사기준처 주관)

- 기술평가 등을 위한 기술심의 위원회 구성 및 운영 등에 관한 사항은 심의 담당부서(심사기준처)에서 별도 방침으로 결정

<최종 평가(기술심의) 중 기술평가 항목 및 배점>

구분	평가항목	배점	비 고(80점 환산)
전체 평가군	안 전 성	32	25
	시 공 성	32	25
	유지보수성	18	15
	생애주기비용	18	15
	합 계	100	80

□ 가격평가(20점)

ㅇ 심의 당일 제출하는 가격 견적서를 “특정공법 선정 매뉴얼”에 따라가격점수 평가(인프라기술처 주관)

- 각 업체는 산출내역서 작성 시, 공단에서 제공한 설계도서 및 수량조서 내용을 반영하고, 산출근거(각 업체별 세부견적서, 단 사전 시장조사 가격보다 2%이상 증액시 평가에서 제척 처리)와 수량을 반드시 기재하고, 설계사가 적정성을 검증한 후 참여업체 간 상호교차 확인

- 검증 완료된 내역서와 심의 당일에 제출하는 견적서가 다를 경우 가격점수 “0점”처리

* 낙찰자 결정 이후 누락된 항목이 확인되면 증액은 인정하지 않으며, 견적서 내 항목별 단가 조정하여 반영

< 가격평가 방법 >

□ 가격점수 = 20점 – 감점 (소숫점 3째 자리에서 절사)

<감점 산정기준 (중간값은 직선 보간법으로 계산)>

균형가격 이상 비율	감점	비 고
5% 까지	3점
20% 이상	15점

* 균형가격은 최고.최저가격을 제외한 추천공법의 평균 가격을 말하며 추천공법이 4개 이하일 경우 전체 평균가격 적용

ㅇ 가격평가 결과 제출(요청부서→심의 주관부서)

- (심의 전까지) 최종 추천공법에 대하여 사전 시장조사 시 제출된 가격(견적금액) 등 적용단가 및 설계사에서 제공된 수량 검증

* 추후 심의 시행 시 사전 시장조사에서 제출된 가격(견적금액)으로 구성된 단가는 검증결과와 동일한 단가로 견적서 작성

** 수량 및 단가 검증 결과에 따른 수량은 변경하지 않는 것이 원칙

- (심의 당일) 별도의 장소(심의장 外)에서 감사실(또는 청렴지킴이) 입회하에 공법사가 직접 밀봉상태의 가격견적서를 제출

- 각 업체는 사전 시장조사 시 제출된 가격보다 2%이상 증액된 경우 해당업체는 평가에서 제척 처리

□ 건설 신기술 가점(3점)

ㅇ 국토교통부 “신기술지정증서”로 확인

Ⅴ		진행계획

1	2	3	4	5	6	7
공모 (공단 홈페이지)	참여의향서 접수	1차 서류 접수	검증 및 숏리스트 선정	수량조서 제공/ 2차 서류 접수	기술심의 요청	최종평가 및 낙찰자 선정
14일간 공단 홈페이지에 공모 (현장설명회 시행) * (필요시) 재공모	해당공법 특허권 등 확인 및 1차 서류제출사항 공지	도면, 계산서 및 각종 증빙자료 등 제출	1차 서류 검증 및 평가군별 숏리스트 선정	수량조서 제공 후 2차 서류 접수서류 적정여부 검토	심의주관부서 (심사기준처)에 기술심의 요청	심의 당일 견적서 제출 및 가격평가 시행
12.16.~12.29.(14일) (현장설명회 12.22.) *(재공모시) 12.30.~1.05(7일간)	12.23.~‘26.1.2. (11일간)	‘26.1.3.~1.9. (7일간)	‘26.1.10.~1.19. (10일간)	‘26.1.20.~1.26. (7일간)	(미정)	심의 이후
	(재공모시) 기존 일정에서 순연하여 추진

※ 상기 일정은 추진상황에 따라 일부 조정 가능

※ (재공모) 공모 후 1개사 공법사만 응모할 경우 재공모(7일) 시행하며, 시행결과 1개 공법사만 응모한 경우 심의 미시행

※ (기한준수) 서류 미제출 및 마감시간 이후 제출시 공법선정 대상에서 제외(참여의향서, 1차 서류 접수, 2차 서류 접수)