KRQP C-05020

Rev.16, 14. January 2026

배수시설

2026. 1.

REVIEW CHART

KRQP C-05020

개정 번호	개정 일자	개정사유 및 내용(근거번호)	작성자	검토자	승인자
0	2014.12.31	신규제정	류완상	김대원 백효순	이동렬
1	2015.03.31	2015년 상반기 건설공사표준품셈 변경분 반영	류완상	백효순	이동렬
2	2015.12.31	2015년 하반기 건설공사표준품셈 변경분 반영	백진호	손병두 백효순	이동렬
3	2016.04.30	2016년 상반기 건설공사표준품셈 변경분 반영	백진호	손병두 백효순	김영하
4	2016.12.31	2016년 하반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	백진호	손병두 백효순	김영하
5	2017.05.29	2017년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	이만수 백효순	김영하
6	2017.09.12	2017년 하반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	이만수 백효순	김영하
7	2018.03.19	2018년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	조순형 백효순	김영하
8	2019.04.02	2019년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	민병균 박진용	손병두
9	2019.12.24	2019년 하반기 신규공종단가 및 관련부서 개정 요구사항 반영	한익표	박창완 박진용	이종윤
10	2020.06.30	2020년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	한익표	박창완 이상현	이계승
11	2021.05.18	2021년 상반기 건설공사 표준품셈 등 변경분 반영	한익표	이창현 심형환	최원일
12	2021.12.29	공단 명칭, CI 변경분 반영	한익표	이창현 심형환	유성기
13	2022.06.03	2022년 건설공사 표준품셈 등 변경분 반영	한익표	이창현 심형환	유성기
14	2023.03.31	2023년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	한익표	안기성 이창현	김종호
15	2024.07.15	2024년 상반기 건설공사표준품셈 변경분, 감사처분 반영	임승빈	백효순 지연희	손병두

개정 번호	개정 일자	개정사유 및 내용(근거번호)	작성자	검토자	승인자
16	2026.01.14	2025년 건설공사표준품셈 변경분, 감사처분 반영	임승빈	박진용 지연희	(代)우기하

목   차

Ⅰ. 수량조서(예시)	1

Ⅱ. 수량산출(예시)	12

1. 토공	12

2. 수로공	14

3. 도수로공	18

4. 집수정공	18

5. 맨홀공	21

6. 관기초공	21

7. 콘크리트관(흄관)	22

8. 강관부설	23

9. 정거장표면배수공	24

Ⅲ. 단가산출(예시)	27

RECORD HISTORY	129

Ⅰ. 수량조서(예시)

KRQP C-05020

-  -

-  -

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
1	토공
1.01	구조물터파기
a	터파기	인력,토사	㎥	1
b	터파기	육상,토사
b-1	터파기	육상,토사(TYPE-1),0～5m	㎥	1
b-2	터파기	육상,토사(TYPE-2),0～5m	㎥	1
b-3	터파기	육상,토사(TYPE-3),0～5m	㎥	1
c	터파기	육상,풍화암	㎥	1
c-1	터파기	육상,풍화암(TYPE-1),0～5m	㎥	1
c-2	터파기	육상,풍화암(TYPE-2),0～5m	㎥	1
d	터파기	육상,연암	㎥	1
d-1	터파기	육상,연암(TYPE-1),0～5m	㎥	1
d-2	터파기	육상,연암(TYPE-2),0～5m	㎥	1
e	터파기	육상,경암	㎥	1
e-1	터파기	육상,경암(TYPE-1),0～5m	㎥	1
e-2	터파기	육상,경암(TYPE-2),0～5m	㎥	1
f	터파기	용수,토사	㎥	1
f-1	터파기	용수,토사(TYPE-1),0～5m	㎥	1
f-2	터파기	용수,토사(TYPE-2),0～5m	㎥	1
f-3	터파기	용수,토사(TYPE-3),0～5m	㎥	1
g	터파기	용수,풍화암	㎥	1
g-1	터파기	용수,풍화암(TYPE-1),0～5m	㎥	1
g-2	터파기	용수,풍화암(TYPE-2),0～5m	㎥	1
h	터파기	용수,연암	㎥	1
h-1	터파기	용수,연암(TYPE-1),0～5m	㎥	1
h-2	터파기	용수,연암(TYPE-2),0～5m	㎥	1
i	터파기	용수,경암	㎥	1
i-1	터파기	용수,경암(TYPE-1),0～5m	㎥	1
i-2	터파기	용수,경암(TYPE-2),0～5m	㎥	1

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
1.02	되메우기 및 다짐
a	되메우기 및 다짐	인력,토사	㎥	1
b	되메우기 및 다짐	소형장비	㎥	1
c	되메우기 및 다짐	대형장비	㎥	1
1.03	잔토처리	인력	㎥	1
1.04	구조물뒷채움
a	구조물뒷채움	대형장비	㎥	1
b	구조물뒷채움	소형장비	㎥	1
1.05	구조물기초깔기	잡석	㎥	1
1.06	구조물기초다짐	잡석	㎥	1
1.07	물푸기
a	물푸기	양수기,D150mm	hr	1
b	물푸기	설치및운반	개소	1
2	수로공
2.01	현장타설콘크리트수로
a	콘크리트타설
a-1	바닥콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1
a-2	바닥콘크리트타설	무근,장비사용타설	㎥	1
a-3	구체콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1
a-4	구체콘크리트타설	철근,펌프차사용	㎥	1
a-5	비탈면콘크리트타설	펌프차사용	㎥	1
b	거푸집
b-1	합판거푸집	6회,H=0～7m	㎡	1
b-2	유로폼	벽체,보통,H=0～7m	㎡	1
b-3	문양거푸집	판넬	㎡	1
c	신축이음
c-1	신축이음	합판,T=12mm	㎡	1
c-2	신축이음	스티로폼,T=10mm	㎡	1
c-3	신축이음	스티로폼,T=20mm	㎡	1
d	배수시설
d-1	배수뒷잡석채움	소형장비	㎥	1
d-2	배수뒷잡석채움	대형장비	㎥	1

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
d-3	부직포설치	300g/㎡	㎡	1
d-4	드레인보드설치	T=20mm	㎡	1
d-5	배수공설치	PVC PIPE,D50mm	m	1
d-6	유공관설치	HDPE PIPE, D200mm	m	1
d-7	유공관잡석채움		㎥	1
e	스페이서설치
e-1	스페이서설치	벽체	㎡	1
e-2	스페이서설치	슬래브및기초	㎡	1
f	철근현장가공및조립
f-1	철근현장가공및조립	Type-Ⅰ-1	ton	1
f-2	철근현장가공및조립	Type-Ⅰ-2	ton	1
f-3	철근현장가공및조립	Type-Ⅱ-1	ton	1
f-4	철근현장가공및조립	Type-Ⅱ-2	ton	1
g	수로뚜껑제작설치	각종	개	1
2.02	프리캐스트제품수로
a	프리캐스트제품수로	중량 50～150kg	m	1
b	프리캐스트제품수로	중량 150～300kg	m	1
c	프리캐스트제품수로	중량 300～500kg	m	1
d	프리캐스트제품수로	중량 500～700kg	m	1
e	프리캐스트제품수로	중량 700～900kg	m	1
f	프리캐스트제품수로	중량 900～1100kg	m	1
g	프리캐스트제품수로	중량 1100～1300kg	m	1
h	프리캐스트제품수로	중량 1300～1500kg	m	1
i	프리캐스트제품수로	중량 1500～1800kg	m	1
j	프리캐스트제품수로	중량 1800～2100kg	m	1

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
3	도수로공
3.01	비탈면콘크리트타설	펌프차사용	㎥	1
3.02	거푸집
a	유로폼	벽체,보통,H=0～7m	㎡	1
b	합판거푸집	4회,H=0～7m	㎡	1
c	합판거푸집	3회,H=0～7m	㎡	1
3.03	철근현장가공및조립
a	철근현장가공및조립	Type-Ⅱ-1	ton	1
b	철근현장가공및조립	Type-Ⅱ-2	ton	1
4	집수정공
4.01	콘크리트타설
a	소형콘크리트타설	무근, 장비사용타설	㎥	1
b	소형콘크리트타설	철근, 장비사용타설	㎥	1
4.02	거푸집
a	합판거푸집	6회,H=0～7m	㎡	1
b	합판거푸집	4회,H=0～7m	㎡	1
c	합판거푸집	3회,H=0～7m	㎡	1
4.03	철근현장가공및조립	Type-Ⅱ	ton	1
a	철근현장가공및조립	Type-Ⅱ-1	ton	1
b	철근현장가공및조립	Type-Ⅱ-2	ton	1
4.04	강관비계	3개월
a	강관비계	H=10m이하	㎡	1
b	강관비계	H=10m초과～20m이하	㎡	1
c	강관비계	H=20m초과～30m이하	㎡	1
4.05	가설계단	3개월
a	경사형	H=6m이하	㎡	1
b	타워형		㎡	1
4.06	사다리설치	발디딤쇠,D22mm	개	1
4.07	스틸그레이팅설치	각종	개	1

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
5	맨홀공
5.01	콘크리트타설
a	소형콘크리트타설	무근, 장비사용타설	㎥	1
b	소형콘크리트타설	철근, 장비사용타설	㎥	1
5.02	거푸집
a	합판거푸집	3회,H=0～7m	㎡	1
b	목재거푸집	4회,H=0～7m	㎡	1
5.03	P.E 원형맨홀거푸집
a	P.E 원형맨홀거푸집	D900mm	개소	1
b	P.E 원형맨홀거푸집	D1,200mm	개소	1
5.04	철근현장가공및조립
a	철근현장가공및조립	Type-Ⅰ-1	ton	1
b	철근현장가공및조립	Type-Ⅰ-2	ton	1
5.05	맨홀뚜껑설치
a	맨홀뚜껑설치	차도용,D648mm	개	1
b	맨홀뚜껑설치	보도용,D648mm	개	1
5.06	사다리설치	발디딤쇠,D22mm	개	1
6	관기초공
6.01	콘크리트타설
a	바닥콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1
b	기초콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1
c	기초콘크리트타설	철근,펌프차사용	㎥	1
6.02	거푸집
a	합판거푸집	6회,H=0～7m	㎡	1
b	합판거푸집	4회,H=0～7m	㎡	1
c	합판거푸집	3회,H=0～7m	㎡	1
d	유로폼	벽체,보통,H=0～7m	㎡	1

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
7	콘크리트관	흄관
7.01	소켓식접합및부설
a	소켓식접합부설	D250mm	m	1	164㎏/본
b	소켓식접합부설	D300mm	m	1	208㎏/본
c	소켓식접합부설	D350mm	m	1	258㎏/본
d	소켓식접합부설	D400mm	m	1	315㎏/본
e	소켓식접합부설	D450mm	m	1	400㎏/본
f	소켓식접합부설	D500mm	m	1	490㎏/본
g	소켓식접합부설	D600mm	m	1	693㎏/본
h	소켓식접합부설	D700mm	m	1	938㎏/본
i	소켓식접합부설	D800mm	m	1	1,218㎏/본
j	소켓식접합부설	D900mm	m	1	1,561㎏/본
k	소켓식접합부설	D1,000mm	m	1	1,932㎏/본
l	소켓식접합부설	D1,100mm	m	1	2,280㎏/본
m	소켓식접합부설	D1,200mm	m	1	2,702㎏/본
n	소켓식접합부설	D1,350mm	m	1	3,274㎏/본
o	소켓식접합부설	D1,500mm	m	1	3,973㎏/본
p	소켓식접합부설	D1,650mm	m	1	4,631㎏/본
q	소켓식접합부설	D1,800mm	m	1	5,330㎏/본
7.02	수밀밴드 접합 및 부설	직관
a	수밀밴드 접합 및 부설	D250mm	m	1	164㎏/본
b	수밀밴드 접합 및 부설	D300mm	m	1	208㎏/본
c	수밀밴드 접합 및 부설	D350mm	m	1	258㎏/본
d	수밀밴드 접합 및 부설	D400mm	m	1	315㎏/본
e	수밀밴드 접합 및 부설	D450mm	m	1	400㎏/본
f	수밀밴드 접합 및 부설	D500mm	m	1	490㎏/본

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
g	수밀밴드 접합 및 부설	D600mm	m	1	693㎏/본
h	수밀밴드 접합 및 부설	D700mm	m	1	938㎏/본
i	수밀밴드 접합 및 부설	D800mm	m	1	1,218㎏/본
j	수밀밴드 접합 및 부설	D900mm	m	1	1,561㎏/본
k	수밀밴드 접합 및 부설	D1,000mm	m	1	1,932㎏/본
l	수밀밴드 접합 및 부설	D1,100mm	m	1	2,280㎏/본
m	수밀밴드 접합 및 부설	D1,200mm	m	1	2,702㎏/본
n	수밀밴드 접합 및 부설	D1,350mm	m	1	3,274㎏/본
o	수밀밴드 접합 및 부설	D1,500mm	m	1	3,973㎏/본
7.03	진동및전압철근콘크리트관	VR관
a	V.R관접합및부설	D400mm	m	1	607㎏/본
b	V.R관접합및부설	D450mm	m	1	693㎏/본
c	V.R관접합및부설	D500mm	m	1	843㎏/본
d	V.R관접합및부설	D600mm	m	1	1,087㎏/본
e	V.R관접합및부설	D700mm	m	1	1,413㎏/본
f	V.R관접합및부설	D800mm	m	1	1,810㎏/본
g	V.R관접합및부설	D900mm	m	1	2,017㎏/본
h	V.R관접합및부설	D1,000mm	m	1	2,563㎏/본
i	V.R관접합및부설	D1,100mm	m	1	3,037㎏/본
j	V.R관접합및부설	D1,200mm	m	1	3,510㎏/본
8	강관부설
8.01	파형강관부설및접합	각종
a	파형강관부설및접합	D250mm	m	1
b	파형강관부설및접합	D300mm	m	1
c	파형강관부설및접합	D400mm	m	1
d	파형강관부설및접합	D450mm	m	1
e	파형강관부설및접합	D500mm	m	1
f	파형강관부설및접합	D600mm	m	1

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
g	파형강관부설및접합	D700mm	m	1
h	파형강관부설및접합	D800mm	m	1
i	파형강관부설및접합	D1,000mm	m	1
j	파형강관부설및접합	D1,200mm	m	1
k	파형강관부설및접합	D1,500mm	m	1
8.02	강관부설및접합	기계부설
a	강관부설및접합	D300mm	m	1
b	강관부설및접합	D350mm	m	1
c	강관부설및접합	D400mm	m	1
d	강관부설및접합	D450mm	m	1
e	강관부설및접합	D500mm	m	1
f	강관부설및접합	D600mm	m	1
g	강관부설및접합	D700mm	m	1
h	강관부설및접합	D800mm	m	1
i	강관부설및접합	D900mm	m	1
j	강관부설및접합	D1,000mm	m	1
k	강관부설및접합	D1,100mm	m	1
l	강관부설및접합	D1,200mm	m	1
m	강관부설및접합	D1,350mm	m	1
n	강관부설및접합	D1,500mm	m	1
o	강관부설및접합	D1,650mm	m	1
p	강관부설및접합	D1,800mm	m	1
q	강관부설및접합	D2,000mm	m	1
r	강관부설및접합	D2,200mm	m	1
s	강관부설및접합	D2,400mm	m	1
9	정거장표면배수공
9.01	관기초공
a	콘크리트타설

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
a-1	바닥콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1
a-2	소형콘크리트타설	무근, 장비사용타설	㎥	1
a-3	소형콘크리트타설	철근, 장비사용타설	㎥	1
a-4	기초콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1
a-5	구체콘크리트타설	철근,펌프차사용	㎥	1
b	거푸집
b-1	합판거푸집	6회,H=0～7m	㎡	1
b-2	합판거푸집	4회,H=0～7m	㎡	1
b-3	합판거푸집	3회,H=0～7m	㎡	1
b-4	유로폼	벽체,보통,H=0～7m	㎡	1
b-5	원형거푸집	3회,H=0～7m	㎡	1
b-6	PE원형맨홀거푸집	D900mm	개소	1
b-7	PE원형맨홀거푸집	D1200mm	개소	1
c	강관비계	3개월
c-1	강관비계	H=10m이하	㎡	1
c-2	강관비계	H=10m초과～20m이하	㎡	1
c-3	강관비계	H=20m초과～30m이하	㎡	1
d	가설계단	3개월
d-1	경사형	H=6m이하	㎡	1
d-2	타워형		㎡	1
e	사다리설치	발디딤쇠,D22mm	개	1
f	맨홀뚜껑설치
f-1	맨홀뚜껑설치	차도용	개	1
f-2	맨홀뚜껑설치	보도용	개	1
g	스틸그레이팅설치	각종	개	1
h	철근현장가공조립
h-1	철근현장가공및조립	Type-Ⅰ-1	ton	1
h-2	철근현장가공및조립	Type-Ⅰ-2	ton	1

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
9.02	콘크리트관부설
a	수밀밴드 접합 및 부설
a-1	수밀밴드 접합 및 부설	D250mm	m	1	164㎏/본
a-2	수밀밴드 접합 및 부설	D300mm	m	1	208㎏/본
a-3	수밀밴드 접합 및 부설	D350mm	m	1	258㎏/본
a-4	수밀밴드 접합 및 부설	D400mm	m	1	315㎏/본
a-5	수밀밴드 접합 및 부설	D450mm	m	1	400㎏/본
a-6	수밀밴드 접합 및 부설	D500mm	m	1	490㎏/본
a-7	수밀밴드 접합 및 부설	D600mm	m	1	693㎏/본
a-8	수밀밴드 접합 및 부설	D700mm	m	1	938㎏/본
a-9	수밀밴드 접합 및 부설	D800mm	m	1	1,218㎏/본
a-10	수밀밴드 접합 및 부설	D900mm	m	1	1,561㎏/본
a-11	수밀밴드 접합 및 부설	D1,000mm	m	1	1,932㎏/본
a-12	수밀밴드 접합 및 부설	D1,100mm	m	1	2,380㎏/본
a-13	수밀밴드 접합 및 부설	D1,200mm	m	1	2,702㎏/본
b	진동및전압철근콘크리트관
b-1	V.R관접합및부설	D400mm	m	1	607㎏/본
b-2	V.R관접합및부설	D450mm	m	1	693㎏/본
b-3	V.R관접합및부설	D500mm	m	1	843㎏/본
b-4	V.R관접합및부설	D600mm	m	1	1,087㎏/본
b-5	V.R관접합및부설	D700mm	m	1	1,413㎏/본
b-6	V.R관접합및부설	D800mm	m	1	1,810㎏/본
b-7	V.R관접합및부설	D900mm	m	1	2,017㎏/본
b-8	V.R관접합및부설	D1,000mm	m	1	2,563㎏/본
b-9	V.R관접합및부설	D1,100mm	m	1	3,307㎏/본
b-10	V.R관접합및부설	D1,200mm	m	1	3,510㎏/본
c	원심력사각수로관부설
c-1	원심력사각수로관부설	D300,400×400×2500mm	m	1	594㎏/본

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
c-2	원심력사각수로관부설	D350,460×460×2500mm	m	1	725㎏/본
c-3	원심력사각수로관부설	D400,520×520×2500mm	m	1	917㎏/본
c-4	원심력사각수로관부설	D450,580×580×2500mm	m	1	1074㎏/본
c-5	원심력사각수로관부설	D500,640×640×2500mm	m	1	1285㎏/본
c-6	원심력사각수로관부설	D600,760×760×2500mm	m	1	1730㎏/본
d	U형플륨관부설	소켓식
d-1	U형플륨관부설	D200mm	m	1	85㎏/본
d-2	U형플륨관부설	D300mm	m	1	135㎏/본
d-3	U형플륨관부설	D400mm	m	1	200㎏/본
d-4	U형플륨관부설	D450mm	m	1	270㎏/본
d-5	U형플륨관부설	D500mm	m	1	330㎏/본
d-6	U형플륨관부설	D600mm	m	1	440㎏/본
d-7	U형플륨관부설	D700mm	m	1	480㎏/본
e	강관부설및접합	기계부설
e-1	강관부설및접합	D300mm	m	1
e-2	강관부설및접합	D350mm	m	1
e-3	강관부설및접합	D400mm	m	1
e-4	강관부설및접합	D450mm	m	1
e-5	강관부설및접합	D500mm	m	1
e-6	강관부설및접합	D600mm	m	1
e-7	강관부설및접합	D700mm	m	1
e-8	강관부설및접합	D800mm	m	1
e-9	강관부설및접합	D900mm	m	1
e-10	강관부설및접합	D1,000mm	m	1
e-11	강관부설및접합	D1,100mm	m	1
e-12	강관부설및접합	D1,200mm	m	1
e-13	강관부설및접합	D1,350mm	m	1
e-14	강관부설및접합	D1,500mm	m	1

Ⅱ. 수량산출(예시)

1. 토  공

가. 구조물 터파기

1) 터파기 - 인력, 토사(㎥)

가) 굴착기계를 투입할 수 없는 협소한 지역이나, 지장물 등으로 인하여 기계시공을 할 수 없는 경우, 또는 굴착량이 적은 소형구조물 등에 적용한다.

다) 터파기의 비탈면은 토질에 따라 적정하게 결정해야 한다.

라) 터파기량은 양단면 평균법으로 산출하고, 다음 표에 따라 토질별로 구분한다.

마) 울타리 기초 터파기에 적용할 수 있다.

<표 1> 인력 터파기의 토질별 분류(예시)

구 분	토 질 별
인력 터파기	보통토사, 경질토사, 고사점토 및 자갈 섞인 토사, 호박돌 섞인 토사, 연암 및 풍화암, 보통암, 경암

2) 터파기 - 육상, 토사, 0～5m(㎥)

가) 터파기 – 육상,토사(TYPE-1),0～5m(㎥)

나) 터파기 – 육상,토사(TYPE-2),0～5m(㎥)

다) 터파기 – 육상,토사(TYPE-3),0～5m(㎥)

3) 터파기 - 육상, 풍화암, 0～5m(㎥)

가) 터파기 – 육상,풍화암(TYPE-1),0～5m(㎥)

나) 터파기 – 육상,풍화암(TYPE-2),0～5m(㎥)

4) 터파기 - 육상, 연암, 0～5m(㎥)

가) 터파기 – 육상,연암(TYPE-1),0～5m(㎥)

나) 터파기 – 육상,연암(TYPE-2),0～5m(㎥)

5) 터파기 - 육상, 경암, 0～5m(㎥)

가) 터파기 – 육상,경암(TYPE-1),0～5m(㎥)

나) 터파기 – 육상,경암(TYPE-2),0～5m(㎥)

2)∼5) 공통

가) 규격 구분은 다음에 준하여 적용한다.

구 분	적용기준
TYPE-1	지반 및 현장조건이 일반적인 경우
TYPE-2	지장물, 가시설 등에 의해 연속작업이 곤란하며 작업방해가 발생하는 조건
TYPE-3	작업공간이 협소(측구 터파기 등)하여 작업효율이 현저하게 저하하는 경우

나) 터파기의 비탈면은 토질에 따라 적정하게 결정해야 한다.

다) 터파기량은 양단면 평균법에 의해 체적으로 산출한다.

라) 연직높이 5m를 기준으로 0～5m, 5m 이상으로 구분 산출한다.

마) 토사는 보통토사와 혼합토사로 구분하며, 혼합토사는 다음을 준하여 적용한다.

(1) 토질이 견고하여 리퍼, 브레이커 등이 병행 작업되는 경우

(2) 호박돌, 자갈 등이 혼합되어 버킷을 가득 채우기 어려운 경우

사) 수로, 방음벽 기초, 옹벽 등의 구조물 터파기에 적용한다.

6) 터파기 - 용수, 토사, 0～5m(㎥)

가) 터파기 – 용수,토사(TYPE-1),0～5m(㎥)

나) 터파기 – 용수,토사(TYPE-2),0～5m(㎥)

다) 터파기 – 용수,토사(TYPE-3),0～5m(㎥)

7) 터파기 - 용수, 풍화암, 0～5m(㎥)

가) 터파기 – 용수,풍화암(TYPE-1),0～5m(㎥)

나) 터파기 – 용수,풍화암(TYPE-2),0～5m(㎥)

8) 터파기 - 용수, 연암, 0～5m(㎥)

가) 터파기 – 용수,풍화암(TYPE-1),0～5m(㎥)

나) 터파기 – 용수,풍화암(TYPE-2),0～5m(㎥)

9) 터파기 - 용수, 경암, 0～5m(㎥)

가) 터파기 – 용수,풍화암(TYPE-1),0～5m(㎥)

나) 터파기 – 용수,풍화암(TYPE-2),0～5m(㎥)

6)∼9) 공통

가) 수량 산출기준은 “2)∼5) 공통“과 같게 적용한다.

나) 터파기 작업량에 따라 물푸기 시간을 별도 산출한다.

나. 되메우기 및 다짐

1) 되메우기 및 다짐 - 인력, 토사(㎥)

가) ‘가. 구조물터파기 / 1) 토사 터파기-인력’으로 굴착된 토공량을 되메우기할 때는 인력 되메우기를 적용한다.

나) 되메우기량은 터파기량에서 구조물 수량을 제한 수량으로 한다. 단, 뒷채움이나 기초잡석깔기 등이 있는 경우는 그 양도 공제한다.

다) 울타리 기초의 되메우기에 적용한다.

2) 되메우기 및 다짐 - 소형장비(㎥)

3) 되메우기 및 다짐 - 대형장비(㎥)

2)∼3) 공통

가) 되메우기량은 터파기량에서 구조물 수량을 제한 수량으로 한다. 단, 뒷채움이나 기초잡석깔기 등이 있는 경우는 그 양도 공제한다.

나) 되메움토는 현장 주변에 적치하여 무대운반을 원칙으로 하나, 시가지 공사 등 현장여건상 현장내 적치가 곤란한 경우 별도 가적치장을 확보하여 운반비를 계상할 수 있다.

다) 수로, 방음벽 기초, 옹벽 등의 구조물 되메우기에 적용한다.

다. 잔토처리 - 인력(㎥)

1) 굴착량이 적은 소형구조물(울타리 기초, 표지판 기초 등)에 적용하며, 1㎥ 내외를 기준으로 한다.

2) 잔토처리량은 (터파기량-되메우기량)으로 한다.

3) 현장내에서 소운반하여 깔고 고르는 잔토처리에 한정한다.

4) 울타리 기초의 잔토량을 현장내에서 깔고 고르는 잔토처리에 적용한다.

<그림 2> 되메우기 및 잔토처리량 산정(예시)

라. 구조물뒷채움 - 잡석(㎥)

1) 구조물뒷채움 - 잡석,대형장비(㎥)

가) 양단면 평균법으로 수량을 산출한다.

나) 암거 등 비교적 대형구조물 뒷채움에 적용한다.

2) 구조물뒷채움 - 잡석,소형장비(㎥)

가) 양단면 평균법으로 수량을 산출한다.

나) 수로 등 비교적 소형구조물의 구조물 뒷채움에 적용한다.

마. 구조물기초깔기 - 잡석(㎥)

1) 두께 T = 0.20～0.30m를 기준하며, 체적으로 수량을 산출한다.

바. 구조물기초다짐 - 잡석(㎥)

1) 마. 구조물 기초깔기’와 공통 적용한다.

2) 수로, 방음벽 기초, 옹벽 등 구조물 기초의 잡석치환에 적용한다.

사. 물푸기

1) 물푸기 - 양수기, D150mm(hr)

가) 터파기에 대한 물푸기 시간

(1) 토사 : 토사 터파기량÷{Q}㎥/hr(수중터파기 작업량) = ( )hr

(2) 풍화암 : 풍화암 터파기량×{Q}hr/㎥(수중터파기 작업량) = ( )hr

(3) 연암및경암 : 연암및경암 터파기량×{Q}hr/㎥(수중터파기 작업량) = ( )hr

터파기 물푸기 시간 : ① + ② + ③ = ( )hr

나) 바닥콘크리트 타설 및 양생 : 1개소×1일×8hr = 8hr

다) 기초거푸집 조립 : 1개소×2일×8hr = 16hr

라) 기초철근 조립 : 1개소×3일×8hr = 24hr

마) 기초콘크리트 타설 및 양생 : 1개소×2일×8hr = 16hr

바) 계 : 가) + 나) + 다) + 라) + 마) = ( )hr

사) 수중 터파기시 적용한다.

2) 물푸기 - 설치 및 운반(개소)

가) 물푸기에 소요되는 장비를 운반 및 설치하는 수량으로 물푸기 개소수로 산출한다.

나) 수중 터파기시 적용한다.

2. 수로공

가. 현장타설콘크리트수로

1) 콘크리트 타설

가) 바닥콘크리트타설 - 무근, 펌프차사용(㎥)

나) 바닥콘크리트타설 - 무근, 장비사용타설(㎥)

가)∼나) 공통

(1) 기초구조물 공사시 바닥(버림) 콘크리트 타설 등에 적용한다.

다) 구체콘크리트타설 - 무근, 펌프차사용(㎥)

라) 구체콘크리트타설 - 철근, 펌프차사용(㎥)

다)∼라) 공통

(1) 콘크리트 펌프차를 이용한 타설 기준으로 붐타설이 가능한 구간에 적용한다.

마) 비탈면콘크리트타설 - 펌프차사용(㎥)

(1) 땅깎기부나 흙쌓기부 비탈면에 시공되는 구조물(도수로, 산마루 측구 등)의 콘크리트 타설에 적용되며, 이와 유사한 조건의 구조물에도 적용할 수 있다.

가)∼마) 공통

(1) 체적으로 수량을 산출한다.

(2) 시설유형 적용기준에 따라 구분하여 적용한다.

구 분	시설유형 적용기준
TYPE-Ⅰ	매트기초 등 펌프차 작업에 제약이 없는 시설물
TYPE-Ⅱ	벽, 기둥, 보, 슬라브, 교대, 교각 등 펌프차 작업에 큰 지장이 없어 일반적인 시공이 가능한 시설물
TYPE-Ⅲ	옹벽, 줄기초, 슬래브 없는[월거더]구조의 기둥과 보 등 펌프차 작업에 제약을 받는 타설부위가 좁거나 깊은 시설물
TYPE-Ⅳ	절/성토부 비탈면에 시공되는 구조물 등 펌프차 작업에 제약이 매우 큰 시설물

2) 거푸집

가) 합판거푸집 - 6회, H=0～7m(㎡)

(1) 콘크리트 타설면의 면적으로 수량을 산출한다.

(2) 연직높이 0～7m를 기준으로 매 3m 증가마다 수량을 별도 산출한다.

(3) 구조물 형상에 따른 사용횟수와 유형은 아래 표를 고려하여 결정한다.

사용횟수	유형	구 조 물
1∼2회	제물치장	제물치장 콘크리트
2회	매우복잡	T형보, 난간, 복잡한 구조의 교각, 교대, 수문관의 본체 등 매우 복잡한 구조
3회	복잡	교대, 교각, 파라펫트, 날개벽 등 복잡한 벽체 구조 건축 라멘구조의 보, 기둥
4회	보통	측구, 수로, 우물통 등 비교적 간단한 벽체 구조, 교량 및 건축 슬래브
6회	간단	수문 또는 관의 기초, 호안 및 보호공의 기초 등 간단한 구조

나) 유로폼 - 벽체,보통,H=0～7m(㎡)

(1) 콘크리트 타설면의 면적으로 수량을 산출한다.

(2) 연직높이 0～7m를 기준으로 매 3m 증가마다 수량을 별도 산출한다.

(3) 유로폼의 인력투입은 아래표를 기준으로 하며, 구조물 형상 또는 현장 조건에 제한을 받는 경우에는 이를 고려하여 결정할 수 있다.

구분	유 형
복잡	토목 : 교대, 날개벽 등 복잡하고 보강이 많은 구조 건축 : 외부 벽체, 보/기둥
보통	측구, 수로, 옹벽, 일반적인 벽체, 박스 등
간단	수문 또는 관의 기초, 건축 매트기초 등 간단한 구조

다) 문양거푸집 - 판넬(㎡)

(1) 콘크리트 타설면의 면적으로 수량을 산출한다.

(2) 구체거푸집 중 미관을 고려해 지반위 전면거푸집에 적용한다.

(3) 거푸집 설치(합판, 유로폼 등) 수량은 별도로 산출한다.

3) 신축이음

가) 신축이음 - 합판, T=12mm(㎡)

나) 신축이음 - 스티로폼, T=10mm(㎡)

다) 신축이음 - 스티로폼, T=20mm(㎡)

가)∼다) 공통

(1) 신축이음의 간격은 20m 이내로 한다.

(2) 수량은 신축이음면의 면적으로 산출한다.

4) 배수시설

가) 배수뒷잡석채움 – 소형장비(㎥)

나) 배수뒷잡석채움 – 대형장비(㎥)

가)∼나) 공통

(1) 수로콘크리트나 옹벽공의 배수공등 배수에 필요한 잡석채움에 적용한다.

(2) 수량은 체적으로 산출한다.

다) 부직포 설치 - 300g/㎡(㎡)

(1) 배수뒷잡석이나 드레인보드를 부직포로 감싸는 수량이다.

(2) 배수뒷잡석이나 드레인보드의 겉면적으로 수량을 산출한다.

(3) 드레인보드에 부직포를 설치시는 부직포를 100mm 겹치게 한다.

라) 드레인보드 설치 - T=20mm(㎡)

(1) 드레인보드의 설치수량은 면적으로 산출한다.

(2) 배수공 상단에서 50cm, 하단에서 50cm 연장된 길이에 옹벽연장을 곱하여 산출한다.

마) 배수공 설치 - PVC PIPE, D50mm(m)

(1) 배수공은 수평에서 10°기울어진 상태로 설치한다.

(2) 배수공 수량은 기울어진 상태를 감안한 연장으로 산출한다.

바) 유공관 설치 - HDPE PIPE, D200mm(m)

(1) 유공관의 설치 연장으로 수량을 산출한다.

사) 유공관잡석채움(㎥)

(1) 채움재의 체적으로 수량을 산출한다.

5) 스페이서 설치

가) 스페이서 설치 - 벽체(㎡)

(1) 벽체의 내측 및 외측은 별도로 산출하지 않는다. 즉, 내측 및 외측 2개소를 합쳐 1개소로 한다.

(2) 스페이서의 설치간격은 평면상에서는 주철근 배치간격의 4배이거나 1.0m 이하로 하고, 단면상에서는 배력철근 배치간격의 4배이거나 1.0m 이하로 한다.

나) 스페이서 설치 - 슬래브및기초(㎡)

(1) 스페이서의 설치간격은 종방향 및 횡방향 주철근 배치간격의 4배이거나 0.60m 이하가 되도록 한다.

가)∼나) 공통

(1) 수량은 스페이서 설치 면적으로 산출한다.

6) 철근 현장가공 및 조립

가) 철근현장가공조립 – Type-Ⅰ-1(ton)

나) 철근현장가공조립 – Type-Ⅰ-2(ton)

다) 철근현장가공조립 – Type-Ⅱ-1(ton)

라) 철근현장가공조립 – Type-Ⅱ-2(ton)

마) 철근현장가공조립 – Type-Ⅲ(ton)

가)∼마) 공통

① 수량은 도면(구조도)에 의해 산출된 철근의 NET ton수로 한다.

② 철근 가공 및 조립의 Type은 아래 표 유형의 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에 적용한다.

구 분		유 형
Type-Ⅰ	Ⅰ-1	- 철근가공 및 조립 작업이 일반적인 토목시설 (반중력식 옹벽, L형 옹벽, 교량 슬래브, 매트기초, 수문 등)
	Ⅰ-2	- 특정위치에서 철근의 가공 및 조립이 반복되는 경우 (빔제작, 철근망 등)
Type-Ⅱ	Ⅱ-1	- 철근가공 및 조립 작업이 복잡한 토목시설(라멘교, 교대, 암거, 지하차도, 부벽식옹벽 등) - Type-Ⅰ 시설에서 직경 13mm이하 철근이 전 철근중량의 50%이상인 경우
	Ⅱ-2	- 콘크리트대비 소량의 철근이 사용되는 경우(측구/개거, 중력식 옹벽, 일체형 중앙분리대 등)
Type-Ⅲ	Ⅲ	- 철근가공 및 조립 작업이 매우 복잡한 토목시설 (교각, 구주식 교대 - 특수 구조시설물에서 철근직경 35mm를 초과하여 인력에 의한 단독시공이 어려운 경우(플랜트, 원자력 발전소 등)

7) 수로뚜껑 제작설치 - 각종(개)

가) 뚜껑수량은 각종 규격별 갯수로 산출한다.

나) 뚜껑 제작에 소요되는 콘크리트, 거푸집, 철근 등은 별도의 재료표로 구성한다.

나. 프리캐스트 제품 수로

1) 프리캐스트 제품 수로 - 중량 50～150kg(m)

2) 프리캐스트 제품 수로 - 중량 150～300kg(m)

3) 프리캐스트 제품 수로 - 중량 300～500kg(m)

4) 프리캐스트 제품 수로 - 중량 500～700kg(m)

5) 프리캐스트 제품 수로 - 중량 700～900kg(m)

6) 프리캐스트 제품 수로 - 중량 900～1100kg(m)

7) 프리캐스트 제품 수로 - 중량 1100～1300kg(m)

8) 프리캐스트 제품 수로 - 중량 1300∼1500kg(m)

9) 프리캐스트 제품 수로 - 중량 1500∼1800kg(m)

10) 프리캐스트 제품 수로 - 중량 1800∼2100kg(m)

1)∼10) 공통

가) 수로의 규격별(ex. 300×300mm) 연장으로 수량을 산출하고, 제품본당의 중량을 표시한다.

나) 터파기 등 토공수량은 별도 산출한다.

3. 도수로공

가. 비탈면콘크리트타설 - 펌프차사용(㎥)

“2 수로공 가. 현장타설콘크리트수로 마) 비탈면콘크리트타설” 참조.

나. 거푸집
1) 유로폼 - 벽체,보통,H=0～7m(㎡)

“2 수로공 가. 현장타설콘크리트수로 2) 거푸집 나) 유로폼” 참조.

2) 합판거푸집 – 4회,H=0～7m(㎡)

3) 합판거푸집 – 3회,H=0～7m(㎡)

2)∼3) 공통

“2 수로공 가. 현장타설콘크리트수로 2) 거푸집 가) 합판거푸집 (1)∼(3)” 참조.

다. 철근 현장가공 및 조립

“2 수로공 가. 현장타설콘크리트수로 6) 철근 현장가공 및 조립” 참조.

4. 집수정공

가. 콘크리트타설

1) 소형콘크리트타설 - 장비사용타설(㎥)

가) 소형구조물은 개소별 소량(12㎥이하)의 타설 위치가 산재되어 있는 경우에 적용한다.

나) 체적으로 수량을 산출한다.

다) 소형구조물의 콘크리트 타설에 적용한다.

나. 거푸집

1) 합판거푸집 - 6회,H=0～7m(㎡)

2) 합판거푸집 - 4회,H=0～7m(㎡)

3) 합판거푸집 - 3회,H=0～7m(㎡)

“2 수로공 가. 현장타설콘크리트수로 2) 거푸집 가) 합판거푸집 (1)∼(3)” 참조.

다. 철근 현장가공 및 조립

“2. 수로공 가. 현장타설콘크리트수로 6) 철근 현장가공 및 조립” 참조.

라. 강관비계 - 3개월(㎡)

1) 수량은 면적으로 산출하며, 산식은 ‘(높이-0.5m)×연장’이다.

2) 연직높이 10m를 기준으로 매 10m 증가마다 수량을 별도 산출한다.

3) 비계를 설치할 때에는 일체형 작업발판(시스템 비계)을 의무적으로 설계에 반영하여야 한다. 다만, 일체형 작업발판(시스템비계) 설치가 곤란한 경사지, 복잡한 구조형식, 비정형구조물, 지반 등 현지여건으로 시스템비계를 사용할 수 없는 경우에는 감독자의 사전승인을 득한 후 강관비계(추락방호망 병행설치)를 적용할 수 있다.

마. 가설계단 - 3개월(㎡)

1) 경사형 – H=6m이하(㎡)

2) 타워형(㎡)

1)∼2) 공통

가) 수량은 필요시, 디딤판의 설치면적(계단참 포함)으로 산출한다.

나) 2)의 경우 현장여건에 따라 침하 및 전도방지를 위한 받침 콘크리트 설치 및 철거 수량을 별도로 산출한다.

바. 사다리설치 - 발디딤쇠,D22mm(개)

1) 집수정 유지보수용 사다리를 기성제품으로 설치하는 수량이다.

2) 설치개소로 수량을 산출한다.

사. 스틸그레이팅 설치 - 각종(개)

집수정의 뚜껑을 스틸그레이팅으로 설치하는 수량으로 각종 크기별 갯수로 산출한다.

<그림 8> 흙쌓기부 집수정 일반도(예시)

<그림 9> 집수정 스틸그레이팅 상세(예시)

<그림 10> 땅깎기부 집수정 일반도(예시)

5. 맨홀공

가. 콘크리트타설

“4. 집수정공 가. 콘크리트타설 1) 소형콘크리트타설” 참조.

나. 거푸집

1) 합판거푸집 - 3회,H=0～7m(㎡)

“2 수로공 가. 현장타설콘크리트수로 2) 거푸집 가) 합판거푸집 (1)∼(3)” 참조.

2) 목재거푸집 - 4회,H=0～7m(㎡)

가) 콘크리트 타설면의 면적으로 수량을 산출한다.

나) 연직높이 0～7m를 기준으로 매 3m 증가마다 수량을 별도 산출한다.

다) 맨홀콘크리트의 원형거푸집에 적용한다.

다. P.E원형맨홀거푸집

1) P.E원형맨홀거푸집 – D900mm(개소)

2) P.E원형맨홀거푸집 – D1,200mm(개소)

1)∼2) 공통

가) 현장타설콘크리트 맨홀 중 내공 D900mm(D1,200mm)의 맨홀에 적용한다.

나) 높이별 개소로 수량을 산출한다.

라. 철근 현장가공 및 조립

“2. 수로공 가. 현장타설콘크리트수로 6) 철근 현장가공 및 조립” 참조.

마. 맨홀뚜껑설치

1) 맨홀뚜껑설치 - 차도용, D648mm(개)

2) 맨홀뚜껑설치 - 보도용, D648mm(개)

1)∼2) 공통

차도(보도)에 설치되는 맨홀의 개소로 산출한다.

바. 사다리설치 - 발디딤쇠,D22mm(개)

1) 맨홀 유지보수용 사다리를 기성제품으로 설치하는 수량이다.

2) 설치개소로 수량을 산출한다.

6. 관기초공

가. 콘크리트타설

1) 바닥콘크리트타설 - 무근,펌프차사용(㎥)

“2 수로공 가. 현장타설콘크리트수로 1) 콘크리트타설 가) 바닥콘크리트타설 및 가)∼마) 공통” 참조.

2) 기초콘크리트타설 - 무근,펌프차사용(㎥)

3) 기초콘크리트타설 - 철근,펌프차사용(㎥)

2)∼3) 공통

“2 수로공 가. 현장타설콘크리트수로 1) 콘크리트타설 다)∼라) 공통 및 가)∼마) 공통” 참조.

나. 거푸집

1) 합판거푸집 - 6회,H=0～7m(㎡)

2) 합판거푸집 - 4회,H=0～7m(㎡)

3) 합판거푸집 - 3회,H=0～7m(㎡)

1)∼3) 공통

“2 수로공 가. 현장타설콘크리트수로 2) 거푸집 가) 합판거푸집 (1)∼(3)” 참조.

4) 유로폼 - 벽체,보통,H=0～7m(㎡)

“2 수로공 가. 현장타설콘크리트수로 2) 거푸집 나) 유로폼” 참조.

7. 콘크리트관 - 흄관

가. 소켓식 접합 및 부설

1) 소켓식 접합 및 부설 - D250mm(m)

2) 소켓식 접합 및 부설 - D300mm(m)

3) 소켓식 접합 및 부설 - D350mm(m)

4) 소켓식 접합 및 부설 - D400mm(m)

5) 소켓식 접합 및 부설 - D450mm(m)

6) 소켓식 접합 및 부설 - D500mm(m)

7) 소켓식 접합 및 부설 - D600mm(m)

8) 소켓식 접합 및 부설 - D700mm(m)

9) 소켓식 접합 및 부설 - D800mm(m)

10) 소켓식 접합 및 부설 - D900mm(m)

11) 소켓식 접합 및 부설 - D1,000mm(m)

12) 소켓식 접합 및 부설 - D1,100mm(m)

13) 소켓식 접합 및 부설 - D1,200mm(m)

14) 소켓식 접합 및 부설 - D1,350mm(m)

15) 소켓식 접합 및 부설 - D1,500mm(m)

16) 소켓식 접합 및 부설 - D1,650mm(m)

17) 소켓식 접합 및 부설 – D1,800mm(m)

1)∼17) 공통

가) 소켓식으로 부설할 관 설치연장으로 수량을 산출한다.

나) 접합 및 부설에 소요되는 재료는 별도로 산출하지 않는다.

나. 수밀밴드 접합 및 부설 - 직관

1) 수밀밴드 접합 및 부설 - D250mm(m)

2) 수밀밴드 접합 및 부설 - D300mm(m)

3) 수밀밴드 접합 및 부설 - D350mm(m)

4) 수밀밴드 접합 및 부설 - D400mm(m)

5) 수밀밴드 접합 및 부설 - D450mm(m)

6) 수밀밴드 접합 및 부설 - D500mm(m)

7) 수밀밴드 접합 및 부설 - D600mm(m)

8) 수밀밴드 접합 및 부설 - D700mm(m)

9) 수밀밴드 접합 및 부설 - D800mm(m)

10) 수밀밴드 접합 및 부설 - D900mm(m)

11) 수밀밴드 접합 및 부설 - D1,000mm(m)

12) 수밀밴드 접합 및 부설 - D1,100mm(m)

13) 수밀밴드 접합 및 부설 - D1,200mm(m)

14) 수밀밴드 접합 및 부설 - D1,350mm(m)

15) 수밀밴드 접합 및 부설 – D1,500mm(m)

1)∼15) 공통

가) 수밀밴드 이음으로 부설할 관 설치연장으로 수량을 산출한다.

나) 접합 및 부설에 소요되는 재료는 별도로 산출하지 않는다.

다. 진동 및 전압 철근콘크리트관 - V.R관

1) V.R관 접합 및 부설 - D400mm(m)

2) V.R관 접합 및 부설 - D450mm(m)

3) V.R관 접합 및 부설 - D500mm(m)

4) V.R관 접합 및 부설 - D600mm(m)

5) V.R관 접합 및 부설 - D700mm(m)

6) V.R관 접합 및 부설 - D800mm(m)

7) V.R관 접합 및 부설 - D900mm(m)

8) V.R관 접합 및 부설 - D1,000mm(m)

9) V.R관 접합 및 부설 - D1,100mm(m)

10) V.R관 접합 및 부설 – D1,200mm(m)

1)∼10) 공통

가) 부설할 관 설치연장으로 수량을 산출한다.

나) 접합 및 부설에 소요되는 재료는 별도로 산출하지 않는다.

8. 강관부설

가. 파형강관 부설 및 접합 - 각종

1) 파형강관 부설 및 접합 - D250mm(m)

2) 파형강관 부설 및 접합 - D300mm(m)

3) 파형강관 부설 및 접합 - D400mm(m)

4) 파형강관 부설 및 접합 - D450mm(m)

5) 파형강관 부설 및 접합 - D500mm(m)

6) 파형강관 부설 및 접합 - D600mm(m)

7) 파형강관 부설 및 접합 - D700mm(m)

8) 파형강관 부설 및 접합 - D800mm(m)

9) 파형강관 부설 및 접합 - D1,000mm(m)

10) 파형강관 부설 및 접합 - D1,200mm(m)

11) 파형강관 부설 및 접합 – D1,500mm(m)

1)∼11) 공통

가) 파형강관의 설치연장으로 수량을 산출한다.

나) 접합 및 부설에 소요되는 재료는 별도로 산출하지 않는다.

나. 강관 부설 및 접합 - 기계부설

1) 강관 부설 및 접합 - D300mm(m)

2) 강관 부설 및 접합 - D350mm(m)

3) 강관 부설 및 접합 - D400mm(m)

4) 강관 부설 및 접합 - D450mm(m)

5) 강관 부설 및 접합 - D500mm(m)

6) 강관 부설 및 접합 - D600mm(m)

7) 강관 부설 및 접합 - D700mm(m)

8) 강관 부설 및 접합 - D800mm(m)

9) 강관 부설 및 접합 - D900mm(m)

10) 강관 부설 및 접합 - D1,000mm(m)

11) 강관 부설 및 접합 - D1,100mm(m)

12) 강관 부설 및 접합 - D1,200mm(m)

13) 강관 부설 및 접합 - D1,350mm(m)

14) 강관 부설 및 접합 - D1,500mm(m)

15) 강관 부설 및 접합 - D1,650mm(m)

16) 강관 부설 및 접합 - D1,800mm(m)

17) 강관 부설 및 접합 - D2,000mm(m)

18) 강관 부설 및 접합 - D2,200mm(m)

19) 강관 부설 및 접합 – D2,400mm(m)

1)∼19) 공통

가) 강관의 설치연장으로 수량을 산출한다.

나) 접합 및 부설, 도장(내부․외부)에 소요되는 재료는 별도로 산출하지 않는다.

다) 강관절단 수량은 별도 산출한다.

9. 정거장 표면배수공

가. 관기초공

1) 콘크리트타설

가) 바닥콘크리트타설 - 무근, 펌프차사용(㎥)

“2 수로공 가. 현장타설콘크리트수로 1) 콘크리트 타설 가) 바닥콘크리트타설 및 가)∼마) 공통” 참조.

나) 소형콘크리트타설 - 장비사용타설(㎥)

“4. 집수정공 가. 콘크리트타설 1) 소형콘크리트타설” 참조.

다) 기초콘크리트타설 - 무근, 펌프차사용(㎥)

라) 구체콘크리트타설 - 철근, 펌프차사용(㎥)

다)∼라) 공통

“2 수로공 가. 현장타설콘크리트수로 다)∼라) 공통 및 가)∼마) 공통” 참조.

2) 거푸집

가) 합판거푸집 - 6회, H=0～7m(㎡)

나) 합판거푸집 - 4회, H=0～7m(㎡)

다) 합판거푸집 - 3회, H=0～7m(㎡)

가)∼다) 공통

“2 수로공 가. 현장타설콘크리트수로 2) 거푸집 가) 합판거푸집 (1)∼(3)” 참조.

라) 유로폼 – 벽체,보통,H=0～7m(㎡)

“2 수로공 가. 현장타설콘크리트수로 2) 거푸집 나) 유로폼” 참조.

마) 원형거푸집 - 3회, H=0～7m(㎡)

(1) 콘크리트 타설면의 면적으로 수량을 산출한다.

(2) 연직높이 0～7m를 기준으로 매 3m 증가마다 수량을 별도 산출한다.

바) PE원형맨홀거푸집 - D900mm(개소)

사) PE원형맨홀거푸집 - D1,200mm(개소)

바)∼사) 공통

“5 맨홀공 다. PE원형맨홀거푸집” 참조.

3) 강관비계 - 3개월(㎡)

“4 집수정공 라. 강관비계” 참조.

4) 가설계단 - 3개월(㎡)

“4 집수정공 마. 가설계단” 참조.

5) 사다리설치 - 발디딤쇠, D22mm(개)

“5 맨홀공 바. 사다리설치” 참조.

6) 맨홀뚜껑설치

“5 맨홀공 마. 맨홀뚜껑설치” 참조.

7) 스틸그레이팅설치 - 각종(개)

집수정의 뚜껑을 스틸그레이팅으로 설치하는 수량으로 각종 크기별 갯수로 산출한다.

8) 철근 현장가공 및 조립

“2. 수로공 가. 현장타설콘크리트수로 6) 철근 현장가공 및 조립” 참조.

나. 콘크리트관부설

1) 수밀밴드 접합 및 부설

“7. 콘크리트관 - 흄관 나. 수밀밴드 접합 및 부설 - 직관 1)∼13) 및 가)∼나)” 참조.

2) 진동 및 전압 철근콘크리트관 - V.R관

“7. 콘크리트관 - 흄관 다. 진동 및 전압 철근콘크리트관 – V.R관 1)∼10) 및 가)∼나)” 참조.

3) 원심력사각수로관 부설

가) 원심력사각수로관 부설 - D300, 400×400×2,500mm(m)

나) 원심력사각수로관 부설 - D350, 460×460×2,500mm(m)

다) 원심력사각수로관 부설 - D400, 520×520×2,500mm(m)

라) 원심력사각수로관 부설 - D450, 580×580×2,500mm(m)

마) 원심력사각수로관 부설 - D500, 640×640×2,500mm(m)

바) 원심력사각수로관 부설 - D600, 760×760×2,500mm(m)

가)∼바) 공통

(1) 부설할 관 설치연장으로 수량을 산출한다.

(2) 접합 및 부설에 소요되는 재료는 별도로 산출하지 않는다.

4) U형플륨관 부설

가) U형플륨관 부설 - D200mm(m)

나) U형플륨관 부설 - D300mm(m)

다) U형플륨관 부설 - D400mm(m)

라) U형플륨관 부설 - D450mm(m)

마) U형플륨관 부설 - D500mm(m)

바) U형플륨관 부설 - D600mm(m)

사) U형플륨관 부설 – D700mm(m)

가)∼사) 공통

(1) 부설할 관 설치연장으로 수량을 산출한다.

(2) 접합 및 부설에 소요되는 재료는 별도로 산출하지 않는다.

5) 강관부설

가) 강관 부설 및 접합 - 기계부설

“8 강관부설 나. 강관 부설 및 접합 – 기계부설 1)∼14) 및 가)∼다)” 참조.

Ⅲ. 단가산출(예시)

단가적용시 현장여건에 따라 작업효율, 적용장비, 운반거리 등을 고려하여야 하며, 건설공사 표준품셈의 개정, 공단기준의 변경 등을 반영한 최신의 품을 적용하여야 한다.

번호

공      종

단위

단 가 산 출 (예 시)

비  고

1

토공

1.01

구조물터파기

a

터파기 (토사,인력)

㎥

1. H = 0～1m

- 현장 토질상태에 따라 변경할 수 있다.

- 주위에 장애물이 없고, 넒은 구역의 터파기인 경우에는 시공량을 40%까지 가산한다.

∴ 일당 시공량 Q = 3.6 ㎥/일

- 보통토사: 특별인부 1인/일 / Q ㎥/일

[공통] 3-2-1 굴착(인력/토사)

b

터파기 (육상,토사, TYPE-1, 0～5m)

㎥

1. 작업조건

1) 토공 장비에 의한 터파기, 드러내기 작업을 포함한다.

2) 흙의 외부 반출을 위한 적재 및 운반작업은 제외되어 있다.

3) 체적환산 계수를 기 반영한 것으로 자연상태의 토량에 적용한다.

4) 굴착 깊이가 5m를 초과하는 경우 시공량을 9% 감하여 적용한다.

5) 일당 시공량 참조(㎥/일)

구 분	TYPE-1	TYPE-2	TYPE-3
보통토사	560	420	190
혼합토사	390	300	150

6) 일당 시공량 Q = 560㎥/일

2. 중기사용료

1) 굴착기(1,0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

[공통] 3-2-4 터파기(기계)

c

터파기 (육상,풍화암, TYPE-1, 0～5m)

㎥

1. 작업조건

1) 토공 장비에 의한 터파기, 드러내기 작업을 포함한다.

2) 흙의 외부 반출을 위한 적재 및 운반작업은 제외되어 있다.

3) 체적환산 계수를 기 반영한 것으로 자연상태의 토량에 적용한다.

4) 굴착 깊이가 5m를 초과하는 경우 시공량을 9% 감하여 적용한다.

5) 일당 시공량 참조(㎥/일)

구 분	TYPE-1	TYPE-2
풍화암	38	35

6) 일당 시공량 Q = 38㎥/일

2. 중기사용료

1) 굴착기(1,0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

2) 대형브레이커(1,0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

3) 소모재료(치즐): 굴착기 기계경비(재료비, 노무비, 경비)의 1%

[공통] 3-2-4 터파기(기계)

번호

공      종

단위

단 가 산 출 (예 시)

비  고

d

터파기 (육상,연암, TYPE-1, 0～5m)

㎥

1. 작업조건

1) 토공 장비에 의한 터파기, 드러내기 작업을 포함한다.

2) 흙의 외부 반출을 위한 적재 및 운반작업은 제외되어 있다.

3) 체적환산 계수를 기 반영한 것으로 자연상태의 토량에 적용한다.

4) 굴착 깊이가 5m를 초과하는 경우 시공량을 9% 감하여 적용한다.

5) 일당 시공량 참조(㎥/일)

구 분	TYPE-1	TYPE-2
연암	30	28

6) 일당 시공량 Q = 30㎥/일

2. 중기사용료

1) 굴착기(1,0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

2) 대형브레이커(1,0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

3) 소모재료(치즐): 굴착기 기계경비(재료비, 노무비, 경비)의 2%

[공통] 3-2-4 터파기(기계)

e

터파기

(육상,경암, TYPE-1, 0～5m)

㎥

1. 작업조건

1) 토공 장비에 의한 터파기, 드러내기 작업을 포함한다.

2) 흙의 외부 반출을 위한 적재 및 운반작업은 제외되어 있다.

3) 체적환산 계수를 기 반영한 것으로 자연상태의 토량에 적용한다.

4) 굴착 깊이가 5m를 초과하는 경우 시공량을 9% 감하여 적용한다.

5) 일당 시공량 참조(㎥/일)

구 분	TYPE-1	TYPE-2
경암	16	14

6) 일당 시공량 Q = 16㎥/일

2. 중기사용료

1) 굴착기(1,0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

2) 대형브레이커(1,0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

3) 소모재료(치즐): 굴착기 기계경비(재료비, 노무비, 경비)의 7%

[공통] 3-2-4 터파기(기계)

번호

공      종

단위

단 가 산 출 (예 시)

비  고

f

터파기 (용수,토사, TYPE-1, 0～5m)

㎥

1. 작업조건

1) 토공 장비에 의한 터파기, 드러내기 작업을 포함한다.

2) 흙의 외부 반출을 위한 적재 및 운반작업은 제외되어 있다.

3) 체적환산 계수를 기 반영한 것으로 자연상태의 토량에 적용한다.

4) 용수발생으로 인해 터파기 작업에 지장이 발생하는 경우 시공량을 25% 감하여 적용한다.

5) 굴착 깊이가 5m를 초과하는 경우 시공량을 9% 감하여 적용한다.

6) 일당 시공량 참조(㎥/일)

구 분	TYPE-1	TYPE-2	TYPE-3
보통토사	560	420	190
혼합토사	390	300	150

7) 일당 시공량 Q = 560㎥/일 × 75/100

2. 중기사용료

1) 굴착기(1,0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

[공통] 3-2-4 터파기(기계)

g

터파기 (용수,풍화암, TYPE-1, 0～5m)

㎥

1. 작업조건

1) 토공 장비에 의한 터파기, 드러내기 작업을 포함한다.

2) 흙의 외부 반출을 위한 적재 및 운반작업은 제외되어 있다.

3) 체적환산 계수를 기 반영한 것으로 자연상태의 토량에 적용한다.

4) 용수발생으로 인해 터파기 작업에 지장이 발생하는 경우 시공량을 25% 감하여 적용한다.

5) 굴착 깊이가 5m를 초과하는 경우 시공량을 9% 감하여 적용한다.

6) 일당 시공량 참조(㎥/일)

구 분	TYPE-1	TYPE-2
풍화암	38	35

7) 일당 시공량 Q = 38㎥/일 × 75/100

2. 중기사용료

1) 굴착기(1,0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

2) 대형브레이커(1,0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

3) 소모재료(치즐): 굴착기 기계경비(재료비, 노무비, 경비)의 1%

[공통] 3-2-4 터파기(기계)

번호

공      종

단위

단 가 산 출 (예 시)

비  고

h

터파기 (용수,연암, TYPE-1, 0～5m)

㎥

1. 작업조건

1) 토공 장비에 의한 터파기, 드러내기 작업을 포함한다.

2) 흙의 외부 반출을 위한 적재 및 운반작업은 제외되어 있다.

3) 체적환산 계수를 기 반영한 것으로 자연상태의 토량에 적용한다.

4) 용수발생으로 인해 터파기 작업에 지장이 발생하는 경우 시공량을 25% 감하여 적용한다.

5) 굴착 깊이가 5m를 초과하는 경우 시공량을 9% 감하여 적용한다.

6) 일당 시공량 참조(㎥/일)

구 분	TYPE-1	TYPE-2
연암	30	28

7) 일당 시공량 Q = 30㎥/일 × 75/100

2. 중기사용료

1) 굴착기(1,0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

2) 대형브레이커(1,0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

3) 소모재료(치즐): 굴착기 기계경비(재료비, 노무비, 경비)의 2%

[공통] 3-2-4 터파기(기계)

i

터파기 (용수,경암, TYPE-1, 0～5m)

㎥

1. 작업조건

1) 토공 장비에 의한 터파기, 드러내기 작업을 포함한다.

2) 흙의 외부 반출을 위한 적재 및 운반작업은 제외되어 있다.

3) 체적환산 계수를 기 반영한 것으로 자연상태의 토량에 적용한다.

4) 용수발생으로 인해 터파기 작업에 지장이 발생하는 경우 시공량을 25% 감하여 적용한다.

5) 굴착 깊이가 5m를 초과하는 경우 시공량을 9% 감하여 적용한다.

6) 일당 시공량 참조(㎥/일)

구 분	TYPE-1	TYPE-2
경암	16	14

7) 일당 시공량 Q = 16㎥/일 × 75/100

2. 중기사용료

1) 굴착기(1,0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

2) 대형브레이커(1,0㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

3) 소모재료(치즐): 굴착기 기계경비(재료비, 노무비, 경비)의 7%

[공통] 3-2-4 터파기(기계)

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
1.02	되메우기 및 다짐
a	되메우기 및 다짐 (인력,토사)	㎥	1. 작업조건 1) 본 품은 흐트러진 상태의 흙 두께를 깔아서 다져진 상태의 토량 기준이다. 2) 본 품은 흙다지기 및 흙고르기를 포함한다 3) 플레이트 콤팩터, 래머 기계경비 산정시 조정원은 계상하지 않는다. 4) 일당 시공량 Q = (18+24)/2 ㎥/일 2. 인건비 1) 특별인부: 1인/일 / Q㎥/일 2) 보통인부: 1인/일 / Q㎥/일 3. 중기사용료 1) 플레이트콤팩터(1.5ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일	[공통] 3-4-3 흙다지기
b	되메우기 및 다짐 (소형장비)	㎥	1. 작업조건 1) 본 품은 소형 다짐장비를 사용한 되메우기 기준이다. 2) 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다. 3) 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용한다. 4) 진동롤러(핸드가이드식) 기계경비 산정시 조정원은 계상하지 않는다 5) 일당 시공량 Q = 130㎥/일 2. 인건비 1) 특별인부: 1인/일 / Q㎥/일 2) 보통인부: 1인/일 / Q㎥/일 3. 중기사용료 1) 굴착기(0.2㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 2) 진동롤러(핸드가이드식,0.7Ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 3) 살수차(5500ℓ): 0.5대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일	[공통] 3-4-6 되메우기 및 다짐 (소형장비)

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c	되메우기 및 다짐 (대형장비)	㎥	1. 작업조건 1) 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 되메우기 기준이다. 2) 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다. 3) 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용한다. 4) 진동롤러(핸드가이드식) 기계경비 산정시 조정원은 계상하지 않는다 5) 일당 시공량 Q = 290㎥/일 2. 인건비 1) 특별인부: 1인/일 / Q㎥/일 2) 보통인부: 1인/일 / Q㎥/일 3. 중기사용료 1) 굴착기(0.6㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 2) 진동롤러(10Ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 3) 진동롤러(핸드가이드식,0.7Ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 4) 살수차(5500ℓ): 0.5대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일	[공통] 3-4-7 되메우기 및 다짐 (대형장비)
1.03	잔토처리(인력)	㎥	1. 인건비(보통인부):0.20인	[공통] 3-2-1 굴착(인력/토사)
1.04	구조물뒷채움
a	구조물뒷채움 (잡석,대형장비)	㎥	1. 잡석구입 및 운반:1.04㎥(할증) 2. 작업조건 1) 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 구조물 뒤채움 기준이다. 2) 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다. 3) 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용한다. 4) 진동롤러(핸드가이드식) 기계경비 산정시 조정원은 계상하지 않는다. 5) 일당 시공량 Q = 250㎥/일 3. 인건비 1) 특별인부: 1인/일 / Q㎥/일 2) 보통인부: 1인/일 / Q㎥/일 4. 중기사용료 1) 굴착기(0.6㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 2) 진동롤러(10Ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 3) 진동롤러(핸드가이드식,0.7Ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 4) 살수차(5500ℓ): 0.5대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일	[공통] 3-4-5 뒤채움 및 다짐(대형장비)

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b	구조물뒷채움 (잡석,소형장비)	㎥	1. 잡석구입 및 운반:1.04㎥(할증) 2. 작업조건 1) 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 구조물 뒤채움 기준이다. 2) 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다. 3) 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용한다. 4) 진동롤러(핸드가이드식) 기계경비 산정시 조정원은 계상하지 않는다. 5) 일당 시공량 Q = 110㎥/일 3. 인건비 1) 특별인부: 1인/일 / Q㎥/일 2) 보통인부: 1인/일 / Q㎥/일 4. 중기사용료 1) 굴착기(0.2㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 2) 진동롤러(핸드가이드식,0.7Ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 3) 살수차(5500ℓ): 0.5대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일	[공통] 3-4-4 뒤채움 및 다짐(소형장비)
1.05	구조물기초깔기 (잡석)	㎥	1. 잡석구입 및 운반:1.04㎥(할증) 2. 고르기(불도저19Ton) D = 20m , L = 1.17 , C = 0.95 , f = 0.95/1.17 = 0.81 E = (0.60+0.35)/2 = 0.48 , q0 = 3.20㎥ V1 = 75m/분(전진3단) , V2 = 98m/분(후진3단) e0 = 0.96(운반거리20m) , q1 = 3.20㎥×0.96 = 3.07㎥ Cm = 20m/75m/분+20m/98m/분+0.25분 = 0.72분 Q1 = (60분×3.07㎥×0.81×0.48)/0.72분 = 99.47㎥/hr Q = 99.47㎥(1/3)=298.41㎥/hr(작업의 제한요소가 적음)	[공통] 8-2-1 불도저
1.06	구조물기초다짐 (잡석)	㎥	1. 잡석구입 및 운반:1.04㎥(할증) 2. 작업조건 1) 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다. 2) 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용한다. 3) 플레이트 콤팩터, 진동롤러(핸드가이드식) 기계경비 산정시 조정원은 계상하지 않는다. 4) 일당 시공량 Q = 90㎥/일 3. 인건비 1) 특별인부: 1인/일 / Q㎥/일 2) 보통인부: 1인/일 / Q㎥/일 4. 중기사용료 1) 굴착기(0.2㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 2) 진동롤러(핸드가이드식,0.7Ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일	[공통] 3-4-8 기초지정

번호

공      종

단위

단 가 산 출 (예 시)

비  고

1.07

물푸기

a

물푸기

(양수기,D150㎜)

hr

1. 중기사용료

1) 양 수 기(D150㎜):1hr

2) 디이젤 엔진(15Hp):1hr

3) 호    스(D150㎜):1hr

2. 유지관리(1일 4회)

- 가동시:(5분/회×4회/일)/60분 = 0.333hr

- 보통인부:1인/일/8hr/일×0.333hr = 0.0416인

b

물푸기

(운반 및 설치)

개소

1. 운반

V = 2500m/hr , T = 450분 , D = 30m , t1 = 25분

Cm = (30m/2500m/hr)×2×60분+25분 = 26.44분

Q = 2인×26.44분/450분/8hr = 0.01469인

2. 설치비(인력운반공):0.01469인

[공통]1-5-1

소운반 및

인력운반

2

수로공

2.01

현장타설콘크리트수로

a

콘크리트타설

a-1

바닥콘크리트타설

(무근,펌프차

,슬럼프15cm

,Type-Ⅰ)

㎥

1. 적용범위

본 품은 콘크리트펌프차(80㎥/hr이상)를 활용한 콘크리트

타설에 적용하며 나머지 조건은 건설표준품셈을 참고하여

슬럼프치, 시설유형 및 현장조건에 따라 조정한다.

2. 일일시공량

(일당)

슬럼프	기준 시공량(㎥)
	무근구조물	철근구조물
8~12cm	130	125
15cm	135	130
18cm이상	145	140

가. 시공량(㎥) : 기준시공량 × f1(시설유형) × f2(현장조건)

※ 펌프차의 타설범위(타설높이 및 수평거리)를 초과하여

펌프차 이동 및 재셋팅이 필요한 경우 회당 시공량의

5%을 감하여 적용한다.

나. 시설유형(f1)

유형	Type-Ⅰ	Type-Ⅱ	Type-Ⅲ	Type-Ⅳ
f1	1.4	1.0	0.8	0.3

[공통]6-1-4 콘크리트 펌프차타설

번호

공      종

단위

단 가 산 출 (예 시)

비  고

다. 현장조건(f2)

유형	조건-1	조건-2	조건-3
f2	1.2	1.0	0.8

∴ Q(시공량)= 135㎥/일 × 1.4(f1) × 1.0(f2) = 189.0㎥/일

3. 인력 및 장비 편성

1) 노무비

가. 콘크리트공 : (3인/일-1인<진동기제외>) / Q㎥/일

나. 특별인부 : (1인/일-1인<진동기제외>) / Q㎥/일

다. 보통인부 : 1인/일 / Q㎥/일

라. 형틀목공 : 1인/일 / Q㎥/일

* 본 편성인력은 콘크리트 진동기 사용 기준으로 진동기를 사용하지 않는 경우 콘크리트공과 특별인부를 각 1인 제외한다.

* 콘크리트 타설작업 시 거푸집 및 동바리의 변형·변위 침하 발생에 따른 거푸집 작업 등 별도 인력이 필요하다고 판단되는 경우 형틀목공을 추가 계상한다.

2) 콘크리트펌프차(80㎥이상)

: 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

3) 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의

기계경비는 : 노무비의 5%

4) 타설 후 발생하는 잔여 콘크리트(배관 내 잔여물 등)의 재료비는 : 노무비의 5%

4. 양생비(무근)

1) 특별인부:0.22인/10㎥=0.022인

2) 제잡비(양생손료,기구손료):인력품의 31%

2025년 건설표준품셈 6-1 콘크리트 및 2016년 건설표준품셈 6-1-2-2 양생비

a-2

바닥콘크리트타설

(무근,장비사용타설)

㎥

∴ 시공량 : Q = 63.0㎥/일

1. 타설인건비

1) 콘크리트공: 3인/일 / Q㎥/일

2) 보통인부: 1인/일 / Q㎥/일

3) 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의

기계경비:인력품의 2%

2. 중기사용료(굴착기,0.6～0.8㎥)

: 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

3. 양생비(무근)

1) 보통인부:0.22인/10㎥=0.022인

2) 제잡비(양생손료,기구손료):인력품의 31%

[공통]6-1-1    레디믹스트     콘크리트타설

2016년         건설표준품셈

6-1-2-2

양생비

번호

공      종

단위

단 가 산 출 (예 시)

비  고

a-3

구체콘크리트타설

(무근,펌프차

,슬럼프15cm

,Type-Ⅲ)

㎥

1. 적용범위

본 품은 콘크리트펌프차(80㎥/hr이상)를 활용한 콘크리트

타설에 적용하며 나머지 조건은 건설표준품셈을 참고하여

슬럼프치, 시설유형 및 현장조건에 따라 조정한다.

2. 일일시공량

(일당)

슬럼프	기준 시공량(㎥)
	무근구조물	철근구조물
8~12cm	130	125
15cm	135	130
18cm이상	145	140

가. 시공량(㎥) : 기준시공량 × f1(시설유형) × f2(현장조건)

※ 펌프차의 타설범위(타설높이 및 수평거리)를 초과하여

펌프차 이동 및 재셋팅이 필요한 경우 회당 시공량의

5%을 감하여 적용한다.

나. 시설유형(f1)

유형	Type-Ⅰ	Type-Ⅱ	Type-Ⅲ	Type-Ⅳ
f1	1.4	1.0	0.8	0.3

다. 현장조건(f2)

유형	조건-1	조건-2	조건-3
f2	1.2	1.0	0.8

∴ Q(시공량)= 135㎥/일 × 0.8(f1) × 1.0(f2) = 108.0㎥/일

3. 인력 및 장비 편성

1) 노무비

가. 콘크리트공 : 3인/일 / Q㎥/일

나. 특별인부 : 1인/일 / Q㎥/일

다. 보통인부 : 1인/일 / Q㎥/일

라. 형틀목공 : 1인/일 / Q㎥/일

* 본 편성인력은 콘크리트 진동기 사용 기준으로 진동기를 사용하지 않는 경우 콘크리트공과 특별인부를 각 1인 제외한다.

* 콘크리트 타설작업 시 거푸집 및 동바리의 변형·변위 침하 발생에 따른 거푸집 작업 등 별도 인력이 필요하다고 판단되는 경우 형틀목공을 추가 계상한다.

2) 콘크리트펌프차(80㎥이상)

: 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

3) 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의

기계경비는 : 노무비의 5%

4) 타설 후 발생하는 잔여 콘크리트(배관 내 잔여물 등)의 재료비는 : 노무비의 5%

4. 양생비(무근)

1) 특별인부:0.22인/10㎥=0.022인

2) 제잡비(양생손료,기구손료):인력품의 31%

[공통]6-1-4 콘크리트 펌프차타설

2025년 건설표준품셈 6-1 콘크리트 및 2016년 건설표준품셈 6-1-2-2 양생비

번호

공      종

단위

단 가 산 출 (예 시)

비  고

a-4

구체콘크리트타설

(철근,펌프차

,슬럼프15cm

,Type-Ⅲ)

㎥

1. 적용범위

본 품은 콘크리트펌프차(80㎥/hr이상)를 활용한 콘크리트

타설에 적용하며 나머지 조건은 건설표준품셈을 참고하여

슬럼프치, 시설유형 및 현장조건에 따라 조정한다.

2. 일일시공량

(일당)

슬럼프	기준 시공량(㎥)
	무근구조물	철근구조물
8~12cm	130	125
15cm	135	130
18cm이상	145	140

가. 시공량(㎥) : 기준시공량 × f1(시설유형) × f2(현장조건)

※ 펌프차의 타설범위(타설높이 및 수평거리)를 초과하여

펌프차 이동 및 재셋팅이 필요한 경우 회당 시공량의

5%을 감하여 적용한다.

나. 시설유형(f1)

유형	Type-Ⅰ	Type-Ⅱ	Type-Ⅲ	Type-Ⅳ
f1	1.4	1.0	0.8	0.3

다. 현장조건(f2)

유형	조건-1	조건-2	조건-3
f2	1.2	1.0	0.8

∴ Q(시공량)= 130㎥/일 × 0.8(f1) × 1.0(f2) = 104.0㎥/일

3. 인력 및 장비 편성

1) 노무비

가. 콘크리트공 : 4인/일 / Q㎥/일

나. 특별인부 : 1인/일 / Q㎥/일

다. 보통인부 : 1인/일 / Q㎥/일

라. 형틀목공 : 1인/일 / Q㎥/일

* 본 편성인력은 콘크리트 진동기 사용 기준으로 진동기를 사용하지 않는 경우 콘크리트공과 특별인부를 각 1인 제외한다.

* 콘크리트 타설작업 시 거푸집 및 동바리의 변형·변위 침하 발생에 따른 거푸집 작업 등 별도 인력이 필요하다고 판단되는 경우 형틀목공을 추가 계상한다.

2) 콘크리트펌프차(80㎥이상)

: 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

3) 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의

기계경비는 : 노무비의 5%

4) 타설 후 발생하는 잔여 콘크리트(배관 내 잔여물 등)의 재료비는 : 노무비의 5%

4. 양생비(철근)

1) 특별인부:0.07인/10㎥=0.007인

2) 제잡비(양생손료,기구손료):인력품의 41%

[공통]6-1-4 콘크리트 펌프차타설

2025년 건설표준품셈 6-1 콘크리트 및 2016년 건설표준품셈 6-1-2-2 양생비

번호

공      종

단위

단 가 산 출 (예 시)

비  고

a-5

비탈면콘크리트타설

(무근,펌프차

,슬럼프15cm

,Type-Ⅳ)

㎥

1. 적용범위

본 품은 콘크리트펌프차(80㎥/hr이상)를 활용한 콘크리트

타설에 적용하며 나머지 조건은 건설표준품셈을 참고하여

슬럼프치, 시설유형 및 현장조건에 따라 조정한다.

2. 일일시공량

(일당)

슬럼프	기준 시공량(㎥)
	무근구조물	철근구조물
8~12cm	130	125
15cm	135	130
18cm이상	145	140

가. 시공량(㎥) : 기준시공량 × f1(시설유형) × f2(현장조건)

※ 펌프차의 타설범위(타설높이 및 수평거리)를 초과하여

펌프차 이동 및 재셋팅이 필요한 경우 회당 시공량의

5%을 감하여 적용한다.

나. 시설유형(f1)

유형	Type-Ⅰ	Type-Ⅱ	Type-Ⅲ	Type-Ⅳ
f1	1.4	1.0	0.8	0.3

다. 현장조건(f2)

유형	조건-1	조건-2	조건-3
f2	1.2	1.0	0.8

∴ Q(시공량)= 135㎥/일 × 0.3(f1) × 1.0(f2) = 40.5㎥/일

3. 인력 및 장비 편성

1) 노무비

가. 콘크리트공 : (3인/일-1인<진동기제외>) / Q㎥/일

나. 특별인부 : (1인/일-1인<진동기제외>) / Q㎥/일

다. 보통인부 : 1인/일 / Q㎥/일

라. 형틀목공 : 1인/일 / Q㎥/일

* 본 편성인력은 콘크리트 진동기 사용 기준으로 진동기를 사용하지 않는 경우 콘크리트공과 특별인부를 각 1인 제외한다.

* 콘크리트 타설작업 시 거푸집 및 동바리의 변형·변위 침하 발생에 따른 거푸집 작업 등 별도 인력이 필요하다고 판단되는 경우 형틀목공을 추가 계상한다.

2) 콘크리트펌프차(80㎥이상)

: 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일

3) 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의

기계경비는 : 노무비의 5%

4) 타설 후 발생하는 잔여 콘크리트(배관 내 잔여물 등)의 재료비는 : 노무비의 5%

4. 양생비(무근)

1) 특별인부:0.22인/10㎥=0.022인

2) 제잡비(양생손료,기구손료):인력품의 31%

[공통]6-1-4 콘크리트 펌프차타설

2025년 건설표준품셈 6-1 콘크리트 및 2016년 건설표준품셈 6-1-2-2 양생비

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b	거푸집
b-1	합판거푸집 (6회,H=0～7m)	㎡	1. 합판거푸집(H=0∼7m이하) 1) 재료비 - 합판(12㎜):1.030㎡×32.7/100 - 각재:0.038㎥×32.7/100 - 소모자재(박리재 등):주자재비의 11%적용 2) 설치 및 해체(6회,간단) ∴ Q(시공량) = 50㎡/일 ① 형틀목공: 5인/일 / Q㎡/일 ② 보통인부: 2인/일 / Q㎡/일 ③ 공구손료 및 경장비 기계경비:인력품의 1% ※ 참조 - 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.	[공통]6-3-1 합판거푸집 설치및해체
b-2	유로폼 (벽체,보통,H=0～7m)	㎡	1. 유로폼(H=0∼7m이하) 1) 재료비 - 패널(600×1200㎜):0.89매/10㎡ - 내부패널((200+200)×1,200㎜):0.03매/10㎡ - 부자재(웨지핀, 플랫타이, 강관파이프,후크):주자재비의 52% - 소모재료(박리재 등) : 주자재비의 5% 2) 설치 및 해체(보통) ∴ Q(시공량) = 35㎡/일 ① 형틀목공: 4인/일 / Q㎡/일 ② 보통인부: 1인/일 / Q㎡/일 ③ 공구손료 및 경장비 기계경비:인력품의 3% ※ 참조 - 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.	[공통]6-3-3 유로폼설치 및해체

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b-3	문양거푸집 (판넬)	㎡	1. 거푸집설치(합판, 유로폼 등)는 별도 계상한다. 2. 재 료 비(1회사용) 1) 문양거푸집: 1.0㎡ 2) 잡재료 및 소모재료비(고정못 등): 주재료비의 2% 3. 설치 및 해체 1) 형틀목공 : 0.07인 2) 보통인부 : 0.03인	[공통]6-3-4 문양거푸집(판넬) 설치및해체
c	신축이음
c-1	신축이음 (합판,T = 12㎜)	㎡	1. 재료비(합판,1210×2420㎜):1.03㎡ 2. 설치비 ※ 시공 난이도를 고려하여 건축목공 제외 1) 보통인부:0.006인 2) 공구손료 및 경장비의 기계경비(인력품의 2%)	[건축]4-2-3 벽체합판설치
c-2	신축이음 (스티로폼,T=10㎜)	㎡	1. 재료비 1) 스티로폼(T = 10㎜):1.10㎡ 2) 접착제:0.035㎏ 2. 설치비 1) 형틀목공 : 0.029인 2) 보통인부 : 0.006인	[건축]5-3-1 단열 발포폴리 스티렌설치 [공통] 6-3-10-2 채움재설치
c-3	신축이음 (스티로폼,T=20㎜)	㎡	1. 재료비 1) 스티로폼(T = 20㎜):1.10㎡ 2) 접착제:0.035㎏ 2. 설치비 1) 형틀목공 : 0.029인 2) 보통인부 : 0.006인	[건축]5-3-1 단열 발포폴리 스티렌설치 [공통] 6-3-10-2 채움재설치

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
d	배수시설
d-1	배수뒷잡석채움 (소형장비)	㎥	1. 잡석구입 및 운반:1.04㎥(할증) 2. 작업조건 1) 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 구조물 뒤채움 기준이다. 2) 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다. 3) 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용한다. 4) 진동롤러(핸드가이드식) 기계경비 산정시 조정원은 계상하지 않는다. 5) 일당 시공량 Q = 110㎥/일 3. 인건비 1) 특별인부: 1인/일 / Q㎥/일 2) 보통인부: 1인/일 / Q㎥/일 4. 중기사용료 1) 굴착기(0.2㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 2) 진동롤러(핸드가이드식,0.7Ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 3) 살수차(5500ℓ): 0.5대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일	[공통] 3-4-4 뒤채움 및 다짐(소형장비)
d-2	배수뒷잡석채움 (대형장비)	㎥	1. 잡석구입 및 운반:1.04㎥(할증) 2. 작업조건 1) 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 구조물 뒤채움 기준이다. 2) 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다. 3) 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용한다. 4) 진동롤러(핸드가이드식) 기계경비 산정시 조정원은 계상하지 않는다. 5) 일당 시공량 Q = 250㎥/일 3. 인건비 1) 특별인부: 1인/일 / Q㎥/일 2) 보통인부: 1인/일 / Q㎥/일 4. 중기사용료 1) 굴착기(0.6㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 2) 진동롤러(10Ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 3) 진동롤러(핸드가이드식,0.7Ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 4) 살수차(5500ℓ): 0.5대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일	[공통] 3-4-5 뒤채움 및 다짐(대형장비)

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
d-3	부직포설치 (300g/㎡)	㎡	1. 재료비 1) 부직포(300g/㎡):1.05㎡ 2) 잡재료비(재료비의 2%) 2. 설치비 1) 특별인부:0.07인/100㎡ = 0.0007인/㎡ 2) 보통인부:0.04인/100㎡ = 0.0004인/㎡ 3) 굴착기(0.40㎥) : 0.10hr/100㎡ = 0.001hr/㎡ 4) 공구손료 및 경장비(봉합기)의 기계경비:인력품의 4%	[공통]5-2-1 매트부설
d-4	드레인보드설치 (T = 20㎜)	㎡	1. 드레인보드 설치 1) 재료비:1.05㎡ 2) 설치비(보통인부):0.006인 2. Pin 설치(콘크리트 Gun 사용기준) 1) 재료비:0.667개/㎡×1.03(할증) = 0.687개/㎡ 2) 설치비(특별인부):1인/500㎡ = 0.002인/㎡ 3) 기구손료(재료비의 5%)	견적단가
d-5	배수공설치 (PVC pipe,D50㎜)	m	1. 재료비(VG1,D50㎜) : 1.05m 2. 설치비(재료비의 5%)
d-6	유공관 설치 (HDPE Pipe,D200㎜)	m	1. 재료비 1) HDPE관,(D200㎜) : 1.05m 2) 조임밴드,(D200㎜) : 1개/6.0m = 0.167개/m 2. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 13개소/일 1) 배관공(수도) : 2인/일 / Q 개소/일 / 6m 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 개소/일 / 6m 3. 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 3%	[토목]6-5-2 P.E관 밴드 접합및부설
d-7	유공관잡석채움 (소형장비)	㎥	1. 잡석구입 및 운반:1.04㎥(할증) 2. 작업조건 1) 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 구조물 뒤채움 기준이다. 2) 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다. 3) 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용한다. 4) 진동롤러(핸드가이드식) 기계경비 산정시 조정원은 계상하지 않는다. 5) 일당 시공량 Q = 110㎥/일 3. 인건비 1) 특별인부: 1인/일 / Q㎥/일 2) 보통인부: 1인/일 / Q㎥/일 4. 중기사용료 1) 굴착기(0.2㎥): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 2) 진동롤러(핸드가이드식,0.7Ton): 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 3) 살수차(5500ℓ): 0.5대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일	[공통] 3-4-4 뒤채움 및 다짐(소형장비)

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
e	스페이서설치
e-1	스페이서설치 (벽체)	㎡	1. 재료비(벽체형):8개 2. 설치비(재료비의 5%)
e-2	스페이서설치 (슬래브및기초)	㎡	1. 재료비(슬래브형):4개 2. 설치비(재료비의 5%)
f	철근현장가공조립
f-1	철근현장가공조립 (Type-Ⅰ-1)	ton	1. 현장가공 ∴ Q(시공량) = 4.5ton/일 1) 철 근 공: 3인/일 / Qton/일 2) 보통인부: 1인/일 / Qton/일 3) 공구손료 및 경장비(철근 가공기 등)의 기계경비 : 인력품의 9% 2. 현장조립 ∴ Q(시공량) = 3.5ton/일 1) 철 근 공: 6인/일 / Qton/일 2) 보통인부: 2인/일 / Qton/일 3) 공구손료 및 경장비의 기계경비 : 인력품의 2% 4) 결속선(#20 0.9㎜):6.50㎏ ※ 참조 - 개소별 소량(0.5ton미만)의 시공 위치가 산재하는 경우 시공량의 50%까지 감하여 적용한다. - 현장여건(고소작업, 철근 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다.	[공통] 6-2-2 현장가공 [공통] 6-2-3 현장조립
f-2	철근현장가공조립 (Type-Ⅰ-2)	ton	1. 현장가공 ∴ Q(시공량) = 4.5ton/일 1) 철 근 공: 3인/일 / Qton/일 2) 보통인부: 1인/일 / Qton/일 3) 공구손료 및 경장비(철근 가공기 등)의 기계경비 : 인력품의 9% 2. 현장조립 ∴ Q(시공량) = 2.2ton/일 1) 철 근 공: 4인/일 / Qton/일 2) 보통인부: 1인/일 / Qton/일 3) 공구손료 및 경장비의 기계경비 : 인력품의 2% 4) 결속선(#20 0.9㎜):6.50㎏ ※ 참조 - 개소별 소량(0.5ton미만)의 시공 위치가 산재하는 경우 시공량의 50%까지 감하여 적용한다. - 현장여건(고소작업, 철근 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다.	[공통] 6-2-2 현장가공 [공통] 6-2-3 현장조립

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
f-3	철근현장가공조립 (Type-Ⅱ-1)	ton	1. 현장가공 ∴ Q(시공량) = 4.0ton/일 1) 철 근 공: 3인/일 / Qton/일 2) 보통인부: 1인/일 / Qton/일 3) 공구손료 및 경장비(철근 가공기 등)의 기계경비 : 인력품의 9% 2. 현장조립 ∴ Q(시공량) = 2.5ton/일 1) 철 근 공: 5인/일 / Qton/일 2) 보통인부: 2인/일 / Qton/일 3) 공구손료 및 경장비의 기계경비 : 인력품의 2% 4) 결속선(#20 0.9㎜):8.00㎏ ※ 참조 - 개소별 소량(0.5ton미만)의 시공 위치가 산재하는 경우 시공량의 50%까지 감하여 적용한다. - 현장여건(고소작업, 철근 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다.	[공통] 6-2-2 현장가공 [공통] 6-2-3 현장조립
f-4	철근현장가공조립 (Type-Ⅱ-2)	ton	1. 현장가공 ∴ Q(시공량) = 4.0ton/일 1) 철 근 공: 3인/일 / Qton/일 2) 보통인부: 1인/일 / Qton/일 3) 공구손료 및 경장비(철근 가공기 등)의 기계경비 : 인력품의 9% 2. 현장조립 ∴ Q(시공량) = 1.0ton/일 1) 철 근 공: 2인/일 / Qton/일 2) 보통인부: 1인/일 / Qton/일 3) 공구손료 및 경장비의 기계경비 : 인력품의 2% 4) 결속선(#20 0.9㎜):8.00㎏ ※ 참조 - 개소별 소량(0.5ton미만)의 시공 위치가 산재하는 경우 시공량의 50%까지 감하여 적용한다. - 현장여건(고소작업, 철근 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다.	[공통] 6-2-2 현장가공 [공통] 6-2-3 현장조립
2.02	프리캐스트제품수로 (콘크리트및P.E)
a	프리캐스트제품 수로 설치 (중량50㎏～150㎏ 미만)	m	1. 재료비 2. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 75본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]6-7-1 플륨관설치

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b	프리캐스트 제품 수로 설치 (중량150㎏～300㎏ 미만)	m	1. 재료비 2. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 63본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]6-7-1 플륨관설치
c	프리캐스트 제품 수로 설치 (중량300㎏～500㎏ 미만)	m	1. 재료비 2. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 52본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]6-7-1 플륨관설치
d	프리캐스트 제품 수로 설치 (중량500㎏～700㎏ 미만)	m	1. 재료비 2. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 42본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]6-7-1 플륨관설치
e	프리캐스트 제품 수로 설치 (중량700㎏～900㎏ 미만)	m	1. 재료비 2. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 36본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]6-7-1 플륨관설치

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
f	프리캐스트 제품 수로 설치 (중량900㎏～1100㎏ 미만)	m	1. 재료비 2. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 31본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]6-7-1 플륨관설치
g	프리캐스트 제품 수로 설치 (중량1100㎏～1300 ㎏미만)	m	1. 재료비 2. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 27본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]6-7-1 플륨관설치
h	프리캐스트 제품 수로 설치 (중량1300㎏～1500㎏미만)	m	1. 재료비 2. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 23본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]6-7-1 플륨관설치
i	프리캐스트 제품 수로 설치 (중량1500㎏～1800㎏미만)	m	1. 재료비 2. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 20본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]6-7-1 플륨관설치
j	프리캐스트 제품 수로 설치 (중량1800㎏～2100 ㎏미만)	m	1. 재료비 2. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 17본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]6-7-1 플륨관설치

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
3	도수로공			하수
3.01	비탈면콘크리트타설 (펌프차,슬럼프 15cm,1회 타설,100㎥미만(50㎥))	㎥	“2 수로공 3.01 현장타설콘크리트수로 a-5 비탈면콘크리트 타설” 참조
3.02	거푸집
a	유로폼 (벽체,보통,H=0～7m)	㎡	“2 수로공 3.01 현장타설콘크리트수로 b 거푸집 b-2 유로폼”참조
b	합판거푸집 (4회,H=0～7m)	㎡	1. 합판거푸집(H=0∼7m이하) 1) 재료비 - 합판(12㎜):1.030㎡×38.0/100 - 각재:0.038㎥×38.0/100 - 소모자재(박리재 등):주자재비의 9%적용 2) 설치 및 해체(4회,보통) ∴ Q(시공량) = 45㎡/일 ① 형틀목공: 5인/일 / Q㎡/일 ② 보통인부: 2인/일 / Q㎡/일 ③ 공구손료 및 경장비 기계경비:인력품의 1% ※ 참조 - 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.	[공통]6-3-1 합판거푸집 설치및해체
c	합판거푸집 (3회,H=0～7m)	㎡	1. 합판거푸집(H=0∼7m이하) 1) 재료비 - 합판(12㎜):1.030㎡×44.3/100 - 각재:0.038㎥×44.3/100 - 소모자재(박리재 등):주자재비의 8%적용 2) 설치 및 해체(3회,복잡) ∴ Q(시공량) = 30㎡/일 ① 형틀목공: 5인/일 / Q㎡/일 ② 보통인부: 2인/일 / Q㎡/일 ③ 공구손료 및 경장비 기계경비:인력품의 1% ※ 참조 - 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.	[공통]6-3-1 합판거푸집 설치및해체
3.03	철근현장가공조립
a	철근현장가공조립 (Type-Ⅱ-1)	ton	“2. 수로공 2.01 현장타설콘크리트수로 f-3 철근현장가공조립” 참조
b	철근현장가공조립 (Type-Ⅱ-2)	ton	“2. 수로공 2.01 현장타설콘크리트수로 f-4 철근현장가공조립” 참조

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
4	집수정공
4.01	콘크리트타설
a	소형콘크리트타설 (무근,장비사용타설)	㎥	∴ 시공량 : Q = 63.0㎥/일×50% = 31.5㎥/일 1. 타설인건비 1) 콘크리트공: 3인/일 / Q㎥/일 2) 보통인부: 1인/일 / Q㎥/일 3) 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의 기계경비:인력품의 2% 2. 중기사용료(굴착기,0.6～0.8㎥) : 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 3. 양생비(무근) 1) 보통인부:0.22인/10㎥=0.022인 2) 제잡비(양생손료,기구손료):인력품의 31%	[공통]6-1-1 레디믹스트 콘크리트타설 2016년 건설표준품셈 6-1-2-2 양생비
b	소형콘크리트타설 (철근,장비사용타설)	㎥	∴ 시공량 : Q = 55.0㎥/일×50% = 27.5㎥/일 1. 타설인건비 1) 콘크리트공: 3인/일 / Q㎥/일 2) 보통인부: 1인/일 / Q㎥/일 3) 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의 기계경비:인력품의 2% 2. 중기사용료(굴착기,0.6～0.8㎥) : 1대/일 × 8hr/대 / Q㎥/일 3. 양생비(철근) 1) 보통인부:0.07인/10㎥=0.007인 2) 제잡비(양생손료,기구손료):인력품의 41%	[공통] 6-1-1 레디믹스트 콘크리트타설 2016년건설 표준품셈 6-1-2-2 양생비
4.02	거푸집
a	합판거푸집 (6회,H=0～7m)	㎡	“2 수로공 3.01 현장타설콘크리트수로 b 거푸집 b-1 합판거 푸집” 참조
b	합판거푸집 (4회,H=0～7m)	㎡	“3 도수로공 4.02 거푸집 b 합판거푸집” 참조
c	합판거푸집 (3회,H=0～7m)	㎡	“3 도수로공 4.02 거푸집 c 합판거푸집” 참조
4.03	철근현장가공조립
a	철근현장가공조립 (Type-Ⅱ-1)	ton	“2. 수로공 2.01 현장타설콘크리트수로 f-3 철근현장가공조립” 참조
b	철근현장가공조립 (Type-Ⅱ-2)	ton	“2. 수로공 2.01 현장타설콘크리트수로 f-4 철근현장가공조립” 참조
4.04	강관비계(3개월)
a	강관비계 (3개월,H=10m이하)	㎡	1. 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단) 설치, 해체작업이 포함되어 있다. 2. 재료비(설계수량 적용) : 손율 적용 1) 강관, 비계기본틀, 장선틀, 가새 : 6% 2) 받침(조절받침)철물 : 9% 3) 조임,이음철물 : 12% 4) 철물(앵커용) : 100% 5) 작업발판 : 6% 3. 설치및해체 1) 비 계 공 : 0.05인 2) 보통인부 : 0.02인 3) 공구손료 및 경장비(전동드릴 등) : 인력품의 2%	[공통]2-7-1 강관비계 설치및해체 [공통]2-2-5 구조물비계 (손율)

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b	강관비계 (3개월,H=10m초과 ～20m이하)	㎡	1. 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단) 설치, 해체 작업이 포함되어 있다. 2. 재료비(설계수량 적용) : 손율 적용 1) 강관, 비계기본틀, 장선틀, 가새 : 6% 2) 받침(조절받침)철물 : 9% 3) 조임, 이음철물 : 12% 4) 철물(앵커용) : 100% 5) 작업발판 : 6% 3. 설치및해체 1) 비 계 공 : 0.06인 2) 보통인부 : 0.02인 3) 공구손료 및 경장비(전동드릴 등) : 인력품의 2%	[공통]2-7-1 강관비계 설치및해체 [공통]2-2-5 구조물비계 (손율)
c	강관비계 (3개월,H=20m초과 ～30m이하)	㎡	1. 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단) 설치, 해체 작업이 포함되어 있다. 2. 재료비(설계수량 적용) : 손율 적용 1) 강관, 비계기본틀, 장선틀, 가새 : 6% 2) 받침(조절받침)철물 : 9% 3) 조임, 이음철물 : 12% 4) 철물(앵커용) : 100% 5) 작업발판 : 6% 3. 설치및해체 1) 비 계 공 : 0.07인 2) 보통인부 : 0.02인 3) 공구손료 및 경장비(전동드릴 등) : 인력품의 2%	[공통]2-7-1 강관비계 설치및해체 [공통]2-2-5 구조물비계 (손율)
4.05	가설계단
a	경사형 (3개월,H=6m이하)	㎡	1. 본 품은 높이 6m이하에서 강관(Φ48.6mm) 조립형 발판을 사용하여 가설계단을 경사 형태로 조립 및 설치하는 기준 이고 가설계단의 폭은 0.9m이하를 기준으로, 비계 및 발판 설치·해체 작업이 포함 되어 있다. 2. 재료비 1) 강관비계(D48.6×2.4㎜) : 28.956m/㎡×0.9㎡/m×6%=1.5636m/m 2) 조임철물(직교,회전) : 37.037개/㎡×0.9㎡/m×12%=4.0개/m 3) 발판(250×900) : 4.377개/㎡×0.9㎡/m×6% = 0.2363개/m 3. 설치및해체 1) 비 계 공 : 0.27인/㎡×0.9㎡/m = 0.243인/m 2) 보통인부 : 0.09인/㎡×0.9㎡/m = 0.081인/m 3) 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비 : 인력품의 2%	[공통]2-7-5 경사형가설계단 설치및해체 [공통]2-2-5 구조물비계 (손율)

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
4.06	사다리설치 (발디딤쇠,D22㎜)	개	1. 재료비:1개 2. 인건비(형틀목공):0.016인/개	참고자료
4.07	스틸그레이팅설치 (각종)	개	1. 재료비:1개 2. 인건비(재료비의 5% 적용)
5	맨홀공
5.01	콘크리트타설
a	소형콘크리트타설 (장비사용타설)	㎥	“4 집수정공 5.01 콘크리트타설 a 소형콘크리트타설” 참조
5.02	거푸집
a	합판거푸집 (3회,H=0～7m)	㎡	“3 도수로공 4.02 거푸집 c 합판거푸집” 참조
b	목재거푸집 (4회,H = 0～7m)	㎡	1. 목재거푸집(H=0∼7m이하) 1) 재료비:목재 1회 사용재료비의 39.7% 적용 2) 노무비:목재 1회 사용인력품의 45.9% 적용 2. 목재거푸집(H=7∼10m이하) 1) 재료비(4회,H=0∼7m):100% 적용 2) 노무비(4회,H=0∼7m):110% 적용 3. 목재거푸집(H=10∼13m이하) 1) 재료비(4회,H=0∼7m):100% 적용 2) 노무비(4회,H=0∼7m):120% 적용	2016년 건설표준품셈 6-3-1 목재거푸집
5.03	P.E원형맨홀거푸집
a	P.E 원형맨홀거푸집 (D900㎜)	개소	1. 재료비 1) P.E거푸집(벽 체):1조/10회 = 0.10회/조 2) P.E거푸집(슬라브):1조/10회 = 0.10회/조 3) P.E거푸집(기 초):1조/10회 = 0.10회/조 2. 설치비(기초및슬라브) 1) 특별인부:0.14인 2) 보통인부:0.25인 3. 설치비(벽체) 1) 특별인부:0.26인 2) 보통인부:0.47인	[공통]6-3-5 합성수지(P.E) 원형맨홀거푸집설치및해체
b	P.E 원형맨홀거푸집 (D1,200㎜)	개소	1. 재료비 1) P.E거푸집(벽 체):1조/10회 = 0.10회/조 2) P.E거푸집(슬라브):1조/10회 = 0.10회/조 3) P.E거푸집(기 초):1조/10회 = 0.10회/조 2. 설치비(기초및슬라브) 1) 특별인부:0.15인 2) 보통인부:0.30인 3. 설치비(벽체) 1) 특별인부:0.31인 2) 보통인부:0.63인	[공통]6-3-5 합성수지(P.E) 원형맨홀거푸집설치및해체

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
5.04	철근현장가공및조립
a	철근현장가공조립 (Type-Ⅰ-1)	ton	“2. 수로공 2.01 현장타설콘크리트수로 f-1 철근현장가공조립” 참조
b	철근현장가공조립 (Type-Ⅰ-2)	ton	“2. 수로공 2.01 현장타설콘크리트수로 f-2 철근현장가공조립” 참조
5.05	맨홀 뚜껑 설치
a	맨홀뚜껑설치 (D648㎜,차도용)	개	1. 재료비:1개 2. 인건비(보통인부):0.30인	참고자료
b	맨홀뚜껑설치 (D648㎜,보도용)	개	1. 재료비:1개 2. 인건비(보통인부):0.30인	참고자료
5.06	사다리설치 (발디딤쇠,D22㎜)	개	1. 재료비:1개 2. 인건비(형틀목공):0.016인/개	참고자료
6	관 기초공
6.01	콘크리트타설
a	바닥콘크리트타설 (무근,펌프차 ,슬럼프15cm ,Type-Ⅰ)	㎥	“2 수로공 3.01 현장타설콘크리트수로 a-1 바닥콘크리트타설” 참조
b	기초콘크리트타설 (무근,펌프차 ,슬럼프15cm ,Type-Ⅲ)	㎥	“2 수로공 3.01 현장타설콘크리트수로 a-3 구체콘크리트타설” 참조
c	기초콘크리트타설 (철근,펌프차 ,슬럼프15cm ,Type-Ⅲ)	㎥	“2 수로공 3.01 현장타설콘크리트수로 a-4 구체콘크리트타설” 참조
6.02	거푸집
a	합판거푸집 (6회,H=0～7m)	㎡	“2 수로공 3.01 현장타설콘크리트수로 b 거푸집 b-1 합판거 푸집” 참조
b	합판거푸집 (4회,H=0～7m)	㎡	“3 도수로공 4.02 거푸집 b 합판거푸집” 참조
c	합판거푸집 (3회,H=0～7m)	㎡	“3. 도수로공 4.02 거푸집 c 합판거푸집” 참조
d	유로폼 (벽체,보통,H=0～7m)	㎡	“2. 수로공 3.01 현장타설콘크리트수로 b 거푸집 b-2 유로폼”참조

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
7	콘크리트관(흄관)
7.01	소켓식접합및부설
a	소켓식 접합 및 부설 (D250㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/0.164Ton/본 = 64회/대 - 묶기 : 30초/회×64회/대 = 1920초/대 - 회전 : 30초/회×64회/대 = 1920초/대 - 풀기 : 30초/회×64회/대 = 1920초/대 ∴ 계 : (1920초/대+1920초/대+1920초/대)/60분 = 96분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×64회/대 = 160m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 96.0분/대(적재), t3 = 96.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 96분+68.57분+96분+0.42분+1.50분 = 262.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 262.49분/대/(60분×1.00×0.90)/160.00m/대 = 0.030hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 원심력콘크리트관(소켓식,D250mm) : 1.03m 2) 콘크리트관고무링(D250mm) : 1개/본/2.5m/본 = 0.40개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 20본/일 1) 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b	소켓식 접합 및 부설 (D300㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/0.208Ton/본 = 50회/대 - 묶기 : 30초/회×50회/대 = 1500초/대 - 회전 : 30초/회×50회/대 = 1500초/대 - 풀기 : 30초/회×50회/대 = 1500초/대 ∴ 계 : (1500초/대+1500초/대+1500초/대)/60분 = 75분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×50회/대 = 125m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 75.0분/대(적재), t3 = 75.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 75분+68.57분+75분+0.42분+1.50분 = 220.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 220.49분/대/(60분×1.00×0.90)/125.00m/대 = 0.033hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 원심력콘크리트관(소켓식,D300mm) : 1.03m 2) 콘크리트관고무링(D300mm) : 1개/본/2.5m/본 = 0.40개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 15본/일 1) 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c	소켓식 접합 및 부설 (D350㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/0.258Ton/본 = 41회/대 - 묶기 : 30초/회×41회/대 = 1230초/대 - 회전 : 30초/회×41회/대 = 1230초/대 - 풀기 : 30초/회×41회/대 = 1230초/대 ∴ 계 : (1230초/대+1230초/대+1230초/대)/60분 = 62분/대 2) 운반비 q1 =2.50m/본×41회/대 = 102.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 62.0분/대(적재), t3 = 62.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 62분+68.57분+62분+0.42분+1.50분 = 194.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 194.49분/대/(60분×1.00×0.90)/102.50m/대 = 0.035hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 원심력콘크리트관(소켓식,D350mm) : 1.03m 2) 콘크리트관고무링(D350mm) : 1개/본/2.5m/본 = 0.40개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 13본/일 1) 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
d	소켓식 접합 및 부설 (D400㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/0.315Ton/본 = 33회/대 - 묶기 : 30초/회×33회/대 = 990초/대 - 회전 : 30초/회×33회/대 = 990초/대 - 풀기 : 30초/회×33회/대 = 990초/대 ∴ 계 : (990초/대+990초/대+990초/대)/60분 = 50분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×33회/대 = 82.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 50.0분/대(적재), t3 = 50.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 50분+68.57분+50분+0.42분+1.50분 = 170.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 170.49분/대/(60분×1.00×0.90)/82.50m/대 = 0.038hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 원심력콘크리트관(소켓식,D400mm) : 1.03m 2) 콘크리트관고무링(D400mm) : 1개/본/2.5m/본 = 0.40개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 11본/일 1) 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
e	소켓식 접합 및 부설 (D450㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/0.400Ton/본 = 26회/대 - 묶기 : 30초/회×26회/대 = 780초/대 - 회전 : 30초/회×26회/대 = 780초/대 - 풀기 : 30초/회×26회/대 = 780초/대 ∴ 계 : (780초/대+780초/대+780초/대)/60분 = 39분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×26회/대 = 65m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 39.0분/대(적재), t3 = 39.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 39분+68.57분+39분+0.42분+1.50분 = 148.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 148.49분/대/(60분×1.00×0.90)/65.00m/대 = 0.042hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 원심력콘크리트관(소켓식,D450mm) : 1.03m 2) 콘크리트관고무링(D450mm) : 1개/본/2.5m/본 = 0.40개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 9.0본/일 1) 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
f	소켓식 접합 및 부설 (D500㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/0.490Ton/본 = 21회/대 - 묶기 : 30초/회×21회/대 = 630초/대 - 회전 : 30초/회×21회/대 = 630초/대 - 풀기 : 30초/회×21회/대 = 630초/대 ∴ 계 : (630초/대+630초/대+630초/대)/60분 = 32분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×21회/대 = 52.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 32.0분/대(적재), t3 = 32.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 32분+68.57분+32분+0.42분+1.50분 = 134.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 134.49분/대/(60분×1.00×0.90)/52.50m/대 = 0.047hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 원심력콘크리트관(소켓식,D500mm) : 1.03m 2) 콘크리트관고무링(D500mm) : 1개/본/2.5m/본 = 0.40개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 8.0본/일 1) 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
g	소켓식 접합 및 부설 (D600㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/0.693Ton/본 = 15회/대 - 묶기 : 30초/회×15회/대 = 450초/대 - 회전 : 30초/회×15회/대 = 450초/대 - 풀기 : 30초/회×15회/대 = 450초/대 ∴ 계 : (450초/대+450초/대+450초/대)/60분 = 23분/대 2) 운반비 q1 =2.50m/본×15회/대 = 37.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 23.0분/대(적재), t3 = 23.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 23분+68.57분+23분+0.42분+1.50분 = 116.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 116.49분/대/(60분×1.00×0.90)/37.50m/대 = 0.058hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 원심력콘크리트관(소켓식,D600mm) : 1.03m 2) 콘크리트관고무링(D600mm) : 1개/본/2.5m/본 = 0.40개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 6.5본/일 1) 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
h	소켓식 접합 및 부설 (D700㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/0.983Ton/본 = 11회/대 - 묶기 : 30초/회×11회/대 = 330초/대 - 회전 : 30초/회×11회/대 = 330초/대 - 풀기 : 30초/회×11회/대 = 330초/대 ∴ 계 : (330초/대+330초/대+330초/대)/60분 = 17분/대 2) 운반비 q1 =2.50m/본×11회/대 = 27.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 17.0분/대(적재), t3 = 17.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 17분+68.57분+17분+0.42분+1.50분 = 104.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 104.49분/대/(60분×1.00×0.90)/27.50m/대 = 0.070hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 원심력콘크리트관(소켓식,D700mm) : 1.03m 2) 콘크리트관고무링(D700mm) : 1개/본/2.5m/본 = 0.40개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 5.5본/일 1) 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
i	소켓식 접합 및 부설 (D800㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/1.218Ton/본 = 9회/대 - 묶기 : 30초/회×9회/대 = 270초/대 - 회전 : 30초/회×9회/대 = 270초/대 - 풀기 : 30초/회×9회/대 = 270초/대 ∴ 계 : (270초/대+270초/대+270초/대)/60분 = 14분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×9회/대 = 22.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 14.0분/대(적재), t3 = 14.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 14분+68.57분+14분+0.42분+1.50분 = 98.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 98.49분/대/(60분×1.00×0.90)/22.50m/대 = 0.081hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 원심력콘크리트관(소켓식,D800mm) : 1.03m 2) 콘크리트관고무링(D800mm) : 1개/본/2.5m/본 = 0.40개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 5.0본/일 1) 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
j	소켓식 접합 및 부설 (D900㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/1.561Ton/본 = 7회/대 - 묶기 : 30초/회×7회/대 = 210초/대 - 회전 : 30초/회×7회/대 = 210초/대 - 풀기 : 30초/회×7회/대 = 210초/대 ∴ 계 : (210초/대+210초/대+210초/대)/60분 = 11분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×7회/대 = 17.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 11.0분/대(적재), t3 = 11.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 11분+68.57분+11분+0.42분+1.50분 = 92.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 92.49분/대/(60분×1.00×0.90)/17.50m/대 = 0.098hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 원심력콘크리트관(소켓식,D900mm) : 1.03m 2) 콘크리트관고무링(D900mm) : 1개/본/2.5m/본 = 0.40개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 5.0본/일 1) 배관공(수도) : 3인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
k	소켓식 접합 및 부설 (D1,000㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/1.932Ton/본 = 5회/대 - 묶기 : 30초/회×5회/대 = 150초/대 - 회전 : 30초/회×5회/대 = 150초/대 - 풀기 : 30초/회×5회/대 = 150초/대 ∴ 계 : (150초/대+150초/대+150초/대)/60분 = 8분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×5회/대 = 12.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 8.0분/대(적재), t3 = 8.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 8분+68.57분+8분+0.42분+1.50분 = 86.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 86.49분/대/(60분×1.00×0.90)/12.50m/대 = 0.128hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 원심력콘크리트관(소켓식,D1,000mm) : 1.03m 2) 콘크리트관고무링(D1,000mm) : 1개/본/2.5m/본 = 0.40개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 4.5본/일 1) 배관공(수도) : 3인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
l	소켓식 접합 및 부설 (D1,100㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/2.380Ton/본 = 4회/대 - 묶기 : 30초/회×4회/대 = 120초/대 - 회전 : 30초/회×4회/대 = 120초/대 - 풀기 : 30초/회×4회/대 = 120초/대 ∴ 계 : (120초/대+120초/대+120초/대)/60분 = 6분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×4회/대 = 10m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 6.0분/대(적재), t3 = 6.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 6분+68.57분+6분+0.42분+1.50분= 82.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 82.49분/대/(60분×1.00×0.90)/10.00m/대 = 0.153hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 원심력콘크리트관(소켓식,D1,100mm) : 1.03m 2) 콘크리트관고무링(D1,100mm) : 1개/본/2.5m/본 = 0.40개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 4.0본/일 1) 배관공(수도) : 3인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
m	소켓식 접합 및 부설 (D1,200㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/2.702Ton/본 = 4회/대 - 묶기 : 30초/회×4회/대 = 120초/대 - 회전 : 30초/회×4회/대 = 120초/대 - 풀기 : 30초/회×4회/대 = 120초/대 ∴ 계 : (120초/대+120초/대+120초/대)/60분 = 6분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×4회/대 = 10m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 6.0분/대(적재), t3 = 6.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 6분+68.57분+6분+0.42분+1.50분 = 82.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 82.49분/대/(60분×1.00×0.90)/10.00m/대 = 0.153hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 원심력콘크리트관(소켓식,D1,200mm) : 1.03m 2) 콘크리트관고무링(D1,200mm) : 1개/본/2.5m/본 = 0.40개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 3.5본/일 1) 배관공(수도) : 3인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
n	소켓식 접합 및 부설 (D1,350㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/3.274Ton/본 = 3회/대 - 묶기 : 30초/회×3회/대 = 90초/대 - 회전 : 30초/회×3회/대 = 90초/대 - 풀기 : 30초/회×3회/대 = 90초/대 ∴ 계 : (90초/대+90초/대+90초/대)/60분 = 5분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×3회/대 = 7.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 5.0분/대(적재), t3 = 5.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 5분+68.57분+5분+0.42분+1.50분 = 80.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 80.49분/대/(60분×1.00×0.90)/7.50m/대 = 0.199hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 원심력콘크리트관(소켓식,D1,350mm) : 1.03m 2) 콘크리트관고무링(D1,350mm) : 1개/본/2.5m/본 = 0.40개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 3.5본/일 1) 배관공(수도) : 3인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
o	소켓식 접합 및 부설 (D1,500㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/3.973Ton/본 = 3회/대 - 묶기 : 30초/회×3회/대 = 90초/대 - 회전 : 30초/회×3회/대 = 90초/대 - 풀기 : 30초/회×3회/대 = 90초/대 ∴ 계 : (90초/대+90초/대+90초/대)/60분 = 5분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×3회/대 = 7.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 5.0분/대(적재), t3 = 5.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 5분+68.57분+5분+0.42분+1.50분 = 80.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 80.49분/대/(60분×1.00×0.90)/7.50m/대 = 0.199hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 원심력콘크리트관(소켓식,D1,500mm) : 1.03m 2) 콘크리트관고무링(D1,500mm) : 1개/본/2.5m/본 = 0.40개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 3.5본/일 1) 배관공(수도) : 4인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
p	소켓식 접합 및 부설 (D1,650㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/4.631Ton/본 = 2회/대 - 묶기 : 30초/회×2회/대 = 60초/대 - 회전 : 30초/회×2회/대 = 60초/대 - 풀기 : 30초/회×2회/대 = 60초/대 ∴ 계 : (60초/대+60초/대+60초/대)/60분 = 3분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×2회/대 = 5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 3.0분/대(적재), t3 = 3.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 3분+68.57분+3분+0.42분+1.50분 = 76.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 76.49분/대/(60분×1.00×0.90)/5.00m/대 = 0.283hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 원심력콘크리트관(소켓식,D1,650mm) : 1.03m 2) 콘크리트관고무링(D1,650mm) : 1개/본/2.5m/본 = 0.40개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 3.0본/일 1) 배관공(수도) : 4인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
q	소켓식 접합 및 부설 (D1,800㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/5.330Ton/본 = 2회/대 - 묶기 : 30초/회×2회/대 = 60초/대 - 회전 : 30초/회×2회/대 = 60초/대 - 풀기 : 30초/회×2회/대 = 60초/대 ∴ 계 : (60초/대+60초/대+60초/대)/60분 = 3분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×2회/대 = 5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 3.0분/대(적재), t3 = 3.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 3분+68.57분+3분+0.42분+1.50분 = 76.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 76.49분/대/(60분×1.00×0.90)/5.00m/대 = 0.283hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 원심력콘크리트관(소켓식,D1,800mm) : 1.03m 2) 콘크리트관고무링(D1,800mm) : 1개/본/2.5m/본 = 0.40개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 3.0본/일 1) 배관공(수도) : 4인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
7.02	수밀밴드 접합 및 부설
a	수밀밴드 접합 및 부설(D250㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/0.164Ton/본 = 64회/대 - 묶기 : 30초/회×64회/대 = 1920초/대 - 회전 : 30초/회×64회/대 = 1920초/대 - 풀기 : 30초/회×64회/대 = 1920초/대 ∴ 계 : (1920초/대+1920초/대+1920초/대)/60분 = 96분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×64회/대 = 160m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 96.0분/대(적재), t3 = 96.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 96분+68.57분+96분+0.42분+1.50분 = 262.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 262.49분/대/(60분×1.00×0.90)/160.00m/대 = 0.030hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 흄관직관 A종(D250㎜) : 1.03m 2) 수밀밴드(D250㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 21본/일 1) 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-2 철근콘크리트관 수밀밴드 접합 및 부설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b	수밀밴드 접합 및 부설(D300㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/0.208Ton/본 = 50회/대 - 묶기 : 30초/회×50회/대 = 1500초/대 - 회전 : 30초/회×50회/대 = 1500초/대 - 풀기 : 30초/회×50회/대 = 1500초/대 ∴ 계 : (1500초/대+1500초/대+1500초/대)/60분 = 75분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×50회/대 = 125m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 75.0분/대(적재), t3 = 75.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 75분+68.57분+75분+0.42분+1.50분 = 220.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 220.49분/대/(60분×1.00×0.90)/125.00m/대 = 0.033hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 흄관직관 A종(D300㎜) : 1.03m 2) 수밀밴드(D300㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 16본/일 1) 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-2 철근콘크리트관 수밀밴드 접합 및 부설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c	수밀밴드 접합 및 부설(D350㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/0.258Ton/본 = 41회/대 - 묶기 : 30초/회×41회/대 = 1230초/대 - 회전 : 30초/회×41회/대 = 1230초/대 - 풀기 : 30초/회×41회/대 = 1230초/대 ∴ 계 : (1230초/대+1230초/대+1230초/대)/60분 = 62분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×41회/대 = 102.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 62.0분/대(적재), t3 = 62.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 62분+68.57분+62분+0.42분+1.50분 = 194.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 194.49분/대/(60분×1.00×0.90)/102.50m/대 = 0.035hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 흄관직관 A종(D350㎜) : 1.03m 2) 수밀밴드(D350㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 13본/일 1) 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-2 철근콘크리트관 수밀밴드 접합 및 부설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
d	수밀밴드 접합 및 부설(D400㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/0.315Ton/본 = 33회/대 - 묶기 : 30초/회×33회/대 = 990초/대 - 회전 : 30초/회×33회/대 = 990초/대 - 풀기 : 30초/회×33회/대 = 990초/대 ∴ 계 : (990초/대+990초/대+990초/대)/60분 = 50분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×33회/대 = 82.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 50.0분/대(적재), t3 = 50.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 50분+68.57분+50분+0.42분+1.50분 = 170.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 170.49분/대/(60분×1.00×0.90)/82.50m/대 = 0.038hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 흄관직관 A종(D400㎜) : 1.03m 2) 수밀밴드(D400㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 11본/일 1) 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-2 철근콘크리트관 수밀밴드 접합 및 부설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
e	수밀밴드 접합 및 부설(D450㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/0.400Ton/본 = 26회/대 - 묶기 : 30초/회×26회/대 = 780초/대 - 회전 : 30초/회×26회/대 = 780초/대 - 풀기 : 30초/회×26회/대 = 780초/대 ∴ 계 : (780초/대+780초/대+780초/대)/60분 = 39분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×26회/대 = 65m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 39.0분/대(적재), t3 = 39.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 39분+68.57분+39분+0.42분+1.50분 = 148.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 148.49분/대/(60분×1.00×0.90)/65.00m/대 = 0.042hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 흄관직관 A종(D450㎜):1.03m 2) 수밀밴드(D450㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 10본/일 1) 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-2 철근콘크리트관 수밀밴드 접합 및 부설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
f	수밀밴드 접합 및 부설(D500㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/0.490Ton/본 = 21회/대 - 묶기 : 30초/회×21회/대 = 630초/대 - 회전 : 30초/회×21회/대 = 630초/대 - 풀기 : 30초/회×21회/대 = 630초/대 ∴ 계 : (630초/대+630초/대+630초/대)/60분 = 32분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×21회/대 = 52.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 32.0분/대(적재), t3 = 32.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 32분+68.57분+32분+0.42분+1.50분= 134.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 134.49분/대/(60분×1.00×0.90)/52.50m/대 = 0.047hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 흄관직관 A종(D500㎜) : 1.03m 2) 수밀밴드(D500㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 9본/일 1) 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-2 철근콘크리트관 수밀밴드 접합 및 부설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
g	수밀밴드 접합 및 부설(D600㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/0.693Ton/본 = 15회/대 - 묶기 : 30초/회×15회/대 = 450초/대 - 회전 : 30초/회×15회/대 = 450초/대 - 풀기 : 30초/회×15회/대 = 450초/대 ∴ 계 : (450초/대+450초/대+450초/대)/60분 = 23분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×15회/대 = 37.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 23.0분/대(적재), t3 = 23.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 23분+68.57분+23분+0.42분+1.50분 = 116.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 116.49분/대/(60분×1.00×0.90)/37.50m/대 = 0.058hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 흄관직관 A종(D600㎜) : 1.03m 2) 수밀밴드(D600㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 7본/일 1) 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-2 철근콘크리트관 수밀밴드 접합 및 부설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
h	수밀밴드 접합 및 부설(D700㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/0.983Ton/본 = 11회/대 - 묶기 : 30초/회×11회/대 = 330초/대 - 회전 : 30초/회×11회/대 = 330초/대 - 풀기 : 30초/회×11회/대 = 330초/대 ∴ 계 : (330초/대+330초/대+330초/대)/60분 = 17분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×11회/대 = 27.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 17.0분/대(적재), t3 = 17.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 17분+68.57분+17분+0.42분+1.50분 = 104.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 104.49분/대/(60분×1.00×0.90)/27.50m/대 = 0.070hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 흄관직관 A종(D700㎜) : 1.03m 2) 수밀밴드(D700㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 6본/일 1) 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-2 철근콘크리트관 수밀밴드 접합 및 부설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
i	수밀밴드 접합 및 부설(D800㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/1.218Ton/본 = 9회/대 - 묶기 : 30초/회×9회/대 = 270초/대 - 회전 : 30초/회×9회/대 = 270초/대 - 풀기 : 30초/회×9회/대 = 270초/대 ∴ 계 : (270초/대+270초/대+270초/대)/60분 = 14분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×9회/대 = 22.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 14.0분/대(적재), t3 = 14.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 14분+68.57분+14분+0.42분+1.50분 = 98.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 98.49분/대/(60분×1.00×0.90)/22.50m/대 = 0.081hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 흄관직관 A종(D800㎜) : 1.03m 2) 수밀밴드(D800㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 5본/일 1) 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-2 철근콘크리트관 수밀밴드 접합 및 부설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
j	수밀밴드 접합 및 부설(D900㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/1.561Ton/본 = 7회/대 - 묶기 : 30초/회×7회/대 = 210초/대 - 회전 : 30초/회×7회/대 = 210초/대 - 풀기 : 30초/회×7회/대 = 210초/대 ∴ 계 : (210초/대+210초/대+210초/대)/60분 = 11분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×7회/대 = 17.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 11.0분/대(적재), t3 = 11.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 11분+68.57분+11분+0.42분+1.50분 = 92.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 92.49분/대/(60분×1.00×0.90)/17.50m/대 = 0.098hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 흄관직관 A종(D900㎜) : 1.03m 2) 수밀밴드(D900㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 5본/일 1) 배관공(수도) : 3인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-2 철근콘크리트관 수밀밴드 접합 및 부설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
k	수밀밴드 접합 및 부설(D1,000㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/1.932Ton/본 = 5회/대 - 묶기 : 30초/회×5회/대 = 150초/대 - 회전 : 30초/회×5회/대 = 150초/대 - 풀기 : 30초/회×5회/대 = 150초/대 ∴ 계 : (150초/대+150초/대+150초/대)/60분 = 8분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×5회/대 = 12.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 8.0분/대(적재), t3 = 8.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 8분+68.57분+8분+0.42분+1.50분 = 86.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 86.49분/대/(60분×1.00×0.90)/12.50m/대 = 0.128hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 흄관직관 A종(D1,000㎜) : 1.03m 2) 수밀밴드(D1,000㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 5본/일 1) 배관공(수도) : 3인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-2 철근콘크리트관 수밀밴드 접합 및 부설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
l	수밀밴드 접합 및 부설(D1,100㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/2.380Ton/본 = 4회/대 - 묶기 : 30초/회×4회/대 = 120초/대 - 회전 : 30초/회×4회/대 = 120초/대 - 풀기 : 30초/회×4회/대 = 120초/대 ∴ 계 : (120초/대+120초/대+120초/대)/60분 = 6분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×4회/대 = 10m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 6.0분/대(적재), t3 = 6.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 6분+68.57분+6분+0.42분+1.50분 = 82.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 82.49분/대/(60분×1.00×0.90)/10.00m/대 = 0.153hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 흄관직관 A종(D1,100㎜) : 1.03m 2) 수밀밴드(D1,100㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 4본/일 1) 배관공(수도) : 3인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-2 철근콘크리트관 수밀밴드 접합 및 부설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
m	수밀밴드 접합 및 부설(D1,200㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/2.702Ton/본 = 4회/대 - 묶기 : 30초/회×4회/대 = 120초/대 - 회전 : 30초/회×4회/대 = 120초/대 - 풀기 : 30초/회×4회/대 = 120초/대 ∴ 계 : (120초/대+120초/대+120초/대)/60분 = 6분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×4회/대 = 10m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 6.0분/대(적재), t3 = 6.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 6분+68.57분+6분+0.42분+1.50분 = 82.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 82.49분/대/(60분×1.00×0.90)/10.00m/대 = 0.153hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 흄관직관 A종(D1,200㎜) : 1.03m 2) 수밀밴드(D1,200㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 4본/일 1) 배관공(수도) : 3인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-2 철근콘크리트관 수밀밴드 접합 및 부설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
l	수밀밴드 접합 및 부설(D1,350㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/3.274Ton/본 = 3회/대 - 묶기 : 30초/회×3회/대 = 90초/대 - 회전 : 30초/회×3회/대 = 90초/대 - 풀기 : 30초/회×3회/대 = 90초/대 ∴ 계 : (90초/대+90초/대+90초/대)/60분 = 5분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×3회/대 = 7.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 5.0분/대(적재), t3 = 5.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 5분+68.57분+5분+0.42분+1.50분 = 80.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 80.49분/대/(60분×1.00×0.90)/7.50m/대 = 0.199hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 흄관직관 A종(D1,350㎜) : 1.03m 2) 수밀밴드(D1,350㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 3.5본/일 1) 배관공(수도) : 3인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-2 철근콘크리트관 수밀밴드 접합 및 부설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
m	수밀밴드 접합 및 부설(D1,500㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/3.973Ton/본 = 3회/대 - 묶기 : 30초/회×3회/대 = 90초/대 - 회전 : 30초/회×3회/대 = 90초/대 - 풀기 : 30초/회×3회/대 = 90초/대 ∴ 계 : (90초/대+90초/대+90초/대)/60분 = 5분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×3회/대 = 7.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 5.0분/대(적재), t3 = 5.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 5분+68.57분+5분+0.42분+1.50분= 80.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 80.49분/대/(60분×1.00×0.90)/7.50m/대 = 0.199hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) 흄관직관 A종(D1,500㎜):1.03m 2) 수밀밴드(D1,500㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3. 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 3.5본/일 1) 배관공(수도) : 4인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2% ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-2 철근콘크리트관 수밀밴드 접합 및 부설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
7.03	진동및전압철근 콘크리트관(VR관)
a	V.R 관 접합 및 부설(D400㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/0.607Ton/본 = 17회/대 - 묶기 : 30초/회×17회/대 = 510초/대 - 회전 : 30초/회×17회/대 = 510초/대 - 풀기 : 30초/회×17회/대 = 510초/대 ∴ 계 : (510초/대+510초/대+510초/대)/60분 = 26분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×17회/대 = 42.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 26.0분/대(적재), t3 = 26.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 26분+68.57분+26분+0.42분+1.50분 = 122.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 122.49분/대/(60분×1.00×0.90)/42.50m/대 = 0.053hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) V.R 관(D400㎜) : 1.03m 2) 고무링(D400㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3) 지수활제 : 56g/본/2.50m/본 = 22.400개/m 3. 중기사용료(크레인,10Ton) : 0.36hr/본/2.50m/본 = 0.144hr/m 4. 노무비 1) 배관공(수도) : 0.31인/본/2.50m/본 = 0.124인/m 2) 보통인부 : 0.13인/본/2.50m/본 = 0.052인/m 3) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2%	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합
b	V.R 관 접합 및 부설(D450㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/0.693Ton/본 = 15회/대 - 묶기 : 30초/회×15회/대 = 450초/대 - 회전 : 30초/회×15회/대 = 450초/대 - 풀기 : 30초/회×15회/대 = 450초/대 ∴ 계 : (450초/대+450초/대+450초/대)/60분 = 23분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×15회/대 = 37.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 23.0분/대(적재), t3 = 23.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 23분+68.57분+23분+0.42분+1.50분 = 116.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 116.49분/대/(60분×1.00×0.90)/37.50m/대 = 0.058hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) V.R 관(D450㎜) : 1.03m 2) 고무링(D450㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3) 지수활제 : 65g/본/2.50m/본 = 26.000개/m 3. 중기사용료(크레인,10Ton) : 0.41hr/본/2.50m/본 = 0.164hr/m 4. 노무비 1) 배관공(수도) : 0.36인/본/2.50m/본 = 0.144인/m 2) 보통인부 : 0.15인/본/2.50m/본 = 0.060인/m 3) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2%	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c	V.R 관 접합 및 부설(D500㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/0.843Ton/본 = 12회/대 - 묶기 : 30초/회×12회/대 = 360초/대 - 회전 : 30초/회×12회/대 = 360초/대 - 풀기 : 30초/회×12회/대 = 360초/대 ∴ 계 : (360초/대+360초/대+360초/대)/60분 = 18분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×12회/대 = 30.0m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 18.0분/대(적재), t3 = 18.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 18분+68.57분+18분+0.42분+1.50분 = 106.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 106.49분/대/(60분×1.00×0.90)/30.00m/대 = 0.066hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) V.R 관(D500㎜) : 1.03m 2) 고무링(D500㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3) 지수활제 : 80g/본/2.50m/본 = 32.000개/m 3. 중기사용료(크레인,10Ton) : 0.46hr/본/2.50m/본 = 0.184hr/m 4. 노무비 1) 배관공(수도) : 0.41인/본/2.50m/본 = 0.164인/m 2) 보통인부 : 0.17인/본/2.50m/본 = 0.068인/m 3) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2%	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합
d	V.R 관 접합 및 부설(D600㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/1.087Ton/본 = 10회/대 - 묶기 : 30초/회×10회/대 = 300초/대 - 회전 : 30초/회×10회/대 = 300초/대 - 풀기 : 30초/회×10회/대 = 300초/대 ∴ 계 : (300초/대+300초/대+300초/대)/60분 = 15분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×10회/대 = 25.0m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 15.0분/대(적재), t3 = 15.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 15분+68.57분+15분+0.42분+1.50분 = 100.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 100.49분/대/(60분×1.00×0.90)/25.00m/대 = 0.074hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) V.R 관(D600㎜) : 1.03m 2) 고무링(D600㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3) 지수활제 : 100g/본/2.50m/본 = 40.000개/m 3. 중기사용료(크레인,10Ton) : 0.56hr/본/2.50m/본 = 0.224hr/m 4. 노무비 1) 배관공(수도) : 0.51인/본/2.50m/본 = 0.204인/m 2) 보통인부 : 0.21인/본/2.50m/본 = 0.084인/m 3) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2%	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
e	V.R 관 접합 및 부설(D700㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/1.413Ton/본 = 7회/대 - 묶기 : 30초/회×7회/대 = 210초/대 - 회전 : 30초/회×7회/대 = 210초/대 - 풀기 : 30초/회×7회/대 = 210초/대 ∴ 계 : (210초/대+210초/대+210초/대)/60분 = 11분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×7회/대 = 17.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 11.0분/대(적재), t3 = 11.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 11분+68.57분+11분+0.42분+1.50분 = 92.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 92.49분/대/(60분×1.00×0.90)/17.50m/대 = 0.098hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) V.R 관(D700㎜) : 1.03m 2) 고무링(D700㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3) 지수활제 : 115g/본/2.50m/본 = 46.000개/m 3. 중기사용료(크레인,10Ton) : 0.66hr/본/2.50m/본 = 0.264hr/m 4. 노무비 1) 배관공(수도) : 0.61인/본/2.50m/본 = 0.244인/m 2) 보통인부 : 0.25인/본/2.50m/본 = 0.010인/m 3) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2%	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합
f	V.R 관 접합 및 부설(D800㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/1.810Ton/본 = 6회/대 - 묶기 : 30초/회×6회/대 = 180초/대 - 회전 : 30초/회×6회/대 = 180초/대 - 풀기 : 30초/회×6회/대 = 180초/대 ∴ 계 : (180초/대+180초/대+180초/대)/60분 = 9분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×6회/대 = 15.0m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 9.0분/대(적재), t3 = 9.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 9분+68.57분+9분+0.42분+1.50분 = 88.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 88.49분/대/(60분×1.00×0.90)/15.0m/대 = 0.109hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) V.R 관(D800㎜) : 1.03m 2) 고무링(D800㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3) 지수활제 : 140g/본/2.50m/본 = 56.000개/m 3. 중기사용료(크레인,10Ton) : 0.76hr/본/2.50m/본 = 0.304hr/m 4. 노무비 1) 배관공(수도) : 0.71인/본/2.50m/본 = 0.284인/m 2) 보통인부 : 0.29인/본/2.50m/본 = 0.116인/m 3) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2%	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
g	V.R 관 접합 및 부설(D900㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/2.017Ton/본 = 5회/대 - 묶기 : 30초/회×5회/대 = 150초/대 - 회전 : 30초/회×5회/대 = 150초/대 - 풀기 : 30초/회×5회/대 = 150초/대 ∴ 계 : (150초/대+150초/대+150초/대)/60분 = 8분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×5회/대 = 12.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 8.0분/대(적재), t3 = 8.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 8분+68.57분+8분+0.42분+1.50분 = 86.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 86.49분/대/(60분×1.00×0.90)/12.50m/대 = 0.128hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) V.R 관(D900㎜) : 1.03m 2) 고무링(D900㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3) 지수활제 : 160g/본/2.50m/본 = 64.000개/m 3. 중기사용료(크레인,15Ton) : 0.86hr/본/2.50m/본 = 0.344hr/m 4. 노무비 1) 배관공(수도) : 0.81인/본/2.50m/본 = 0.324인/m 2) 보통인부 : 0.33인/본/2.50m/본 = 0.132인/m 3) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2%	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합
h	V.R 관 접합 및 부설(D1,000㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/2.563Ton/본 = 4회/대 - 묶기 : 30초/회×4회/대 = 120초/대 - 회전 : 30초/회×4회/대 = 120초/대 - 풀기 : 30초/회×4회/대 = 120초/대 ∴ 계 : (120초/대+120초/대+120초/대)/60분 = 6분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×4회/대 = 10m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 6.0분/대(적재), t3 = 6.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 6분+68.57분+6분+0.42분+1.50분 = 82.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 82.49분/대/(60분×1.00×0.90)/10.00m/대 = 0.153hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) V.R 관(D1,000㎜) : 1.03m 2) 고무링(D1,000㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3) 지수활제 : 180g/본/2.50m/본 = 72.000개/m 3. 중기사용료(크레인,15Ton) : 0.96hr/본/2.50m/본 = 0.384hr/m 4. 노무비 1) 배관공(수도) : 0.91인/본/2.50m/본 = 0.364인/m 2) 보통인부 : 0.37인/본/2.50m/본 = 0.148인/m 3) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2%	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
i	V.R 관 접합 및 부설(D1,100㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/3.037Ton/본 = 3회/대 - 묶기 : 30초/회×3회/대 = 90초/대 - 회전 : 30초/회×3회/대 = 90초/대 - 풀기 : 30초/회×3회/대 = 90초/대 ∴ 계 : (90초/대+90초/대+90초/대)/60분 = 5분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×3회/대 = 7.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 5.0분/대(적재), t3 = 5.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 5분+68.57분+5분+0.42분+1.50분 = 80.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 80.49분/대/(60분×1.00×0.90)/7.50m/대 = 0.199hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) V.R 관(D1,100㎜) : 1.03m 2) 고무링(D1,100㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3) 지수활제 : 210g/본/2.50m/본 = 84.000개/m 3. 중기사용료(크레인,15Ton) : 1.06hr/본/2.50m/본 = 0.424hr/m 4. 노무비 1) 배관공(수도) : 1.01인/본/2.50m/본 = 0.404인/m 2) 보통인부 : 0.41인/본/2.50m/본 = 0.164인/m 3) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2%	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합
j	V.R 관 접합 및 부설(D1,200㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재 : 10.5Ton/대/3.510Ton/본 = 3회/대 - 묶기 : 30초/회×3회/대 = 90초/대 - 회전 : 30초/회×3회/대 = 90초/대 - 풀기 : 30초/회×3회/대 = 90초/대 ∴ 계 : (90초/대+90초/대+90초/대)/60분 = 5분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×3회/대 = 7.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 5.0분/대(적재), t3 = 5.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 5분+68.57분+5분+0.42분+1.50분 = 80.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 80.49분/대/(60분×1.00×0.90)/7.50m/대 = 0.199hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간 : 480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부 : 2인/일/8.0hr/일×0.01hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비 1) V.R 관(D1,200㎜) : 1.03m 2) 고무링(D1,200㎜) : 1개/본/2.50m/본 = 0.400개/m 3) 지수활제 : 240g/본/2.50m/본 = 96.000개/m 3. 중기사용료(크레인,15Ton) : 1.16hr/본/2.50m/본 = 0.464hr/m 4. 노무비 1) 배관공(수도) : 1.11인/본/2.50m/본 = 0.444인/m 2) 보통인부 : 0.45인/본/2.50m/본 = 0.180인/m 3) 공구손료 및 잡재료비 : 인력품의 2%	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-6-1 원심력 철근콘크리트관 소켓관 부설 및 접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
8	강관부설
8.01	파형강관 부설 및 접합
a	파형강관 부설 및 접합(D250㎜)	m	1. 운반비 1) 운반비(현장도착도) 2) 하차비(10Ton,크레인) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 3) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 재료비 1) 파형강관(D250㎜):1.05m 2) 고재대:14.1㎏/m×0.05m = 0.705㎏ 3) 커플링밴드(D250㎜):1set/본/6.00m/본 = 0.167개/m 3. 노무비 1) 배관공(수도):0.04인/본/6.00m/본=0.007인/m 2) 보통인부:0.02인/본/6.00m/본=0.003인/m 4. 중기사용료(트럭탑재형크레인,5Ton) : 0.12hr/본/6.00m/본=0.020hr/m 5. 공구손료 및 잡재료비:인력품의 2%	[토목]6-7-2 파형강관 부설및접합
b	파형강관 부설 및 접합(D300㎜)	m	1. 운반비 1) 운반비(현장도착도) 2) 하차비(10Ton,크레인) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 3) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 재료비 1) 파형강관(D300㎜):1.05m 2) 고재대:17.0㎏/m×0.05m = 0.85㎏ 3) 커플링밴드(D300㎜):1set/본/6.00m/본 = 0.167개/m 3. 노무비 1) 배관공(수도):0.06인/본/6.00m/본=0.010인/m 2) 보통인부:0.03인/본/6.00m/본=0.005인/m 4. 중기사용료(트럭탑재형크레인,5Ton) : 0.13hr/본/6.00m/본=0.022hr/m 5. 공구손료 및 잡재료비:인력품의 2%	[토목]6-7-2 파형강관 부설및접합
c	파형강관 부설 및 접합(D400㎜)	m	1. 운반비 1) 운반비(현장도착도) 2) 하차비(10Ton,크레인) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 3) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 재료비 1) 파형강관(D400㎜):1.05m 2) 고재대:21.4㎏/m×0.05m = 1.07㎏ 3) 커플링밴드(D400㎜):1set/본/6.00m/본 = 0.167개/m 3. 노무비 1) 배관공(수도):0.10인/본/6.00m/본=0.017인/m 2) 보통인부:0.05인/본/6.00m/본=0.008인/m 4. 중기사용료(트럭탑재형크레인,5Ton) : 0.16hr/본/6.00m/본=0.027hr/m 5. 공구손료 및 잡재료비:인력품의 2%	[토목]6-7-2 파형강관 부설및접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
d	파형강관 부설 및 접합(D450㎜)	m	1. 운반비 1) 운반비(현장도착도) 2) 하차비(10Ton,크레인) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 3) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 재료비 1) 파형강관(D450㎜):1.05m 2) 고재대:23.1㎏/m×0.05m = 1.155㎏ 3) 커플링밴드(D450㎜):1set/본/6.00m/본 = 0.167개/m 3. 노무비 1) 배관공(수도):0.12인/본/6.00m/본=0.020인/m 2) 보통인부:0.06인/본/6.00m/본=0.010인/m 4. 중기사용료(트럭탑재형크레인,5Ton) : 0.17hr/본/6.00m/본=0.028hr/m 5. 공구손료 및 잡재료비:인력품의 2%	[토목]6-7-2 파형강관 부설및접합
e	파형강관 부설 및 접합(D500㎜)	m	1. 운반비 1) 운반비(현장도착도) 2) 하차비(10Ton,크레인) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 3) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 재료비 1) 파형강관(D500㎜):1.05m 2) 고재대:26.4㎏/m×0.05m = 1.32㎏ 3) 커플링밴드(D500㎜):1set/본/6.00m/본 = 0.167개/m 3. 노무비 1) 배관공(수도):0.13인/본/6.00m/본=0.022인/m 2) 보통인부:0.07인/본/6.00m/본=0.012인/m 4. 중기사용료(트럭탑재형크레인,5Ton) : 0.18hr/본/6.00m/본=0.030hr/m 5. 공구손료 및 잡재료비:인력품의 2%	[토목]6-7-2 파형강관 부설및접합
f	파형강관 부설 및 접합(D600㎜)	m	1. 운반비 1) 운반비(현장도착도) 2) 하차비(10Ton,크레인) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 3) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 재료비 1) 파형강관(D600㎜):1.05m 2) 고재대:30.8㎏/m×0.05m = 1.54㎏ 3) 커플링밴드(D600㎜):1set/본/6.00m/본 = 0.167개/m 3. 노무비 1) 배관공(수도):0.17인/본/6.00m/본=0.028인/m 2) 보통인부:0.08인/본/6.00m/본=0.013인/m 4. 중기사용료(트럭탑재형크레인,5Ton) : 0.20hr/본/6.00m/본=0.033hr/m 5. 공구손료 및 잡재료비:인력품의 2%	[토목]6-7-2 파형강관 부설및접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
g	파형강관 부설 및 접합(D700㎜)	m	1. 운반비 1) 운반비(현장도착도) 2) 하차비(10Ton,크레인) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 3) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 재료비 1) 파형강관(D700㎜):1.00m 2) 고재대:34.5㎏/m×0.05m = 1.725㎏ 3) 커플링밴드(D700㎜):1set/본/6.00m/본 = 0.167개/m 3. 노무비 1) 배관공(수도):0.21인/본/6.00m/본=0.035인/m 2) 보통인부:0.10인/본/6.00m/본=0.017인/m 4. 중기사용료(트럭탑재형크레인,5Ton) : 0.23hr/본/6.00m/본=0.038hr/m 5. 공구손료 및 잡재료비:인력품의 2%	[토목]6-7-2 파형강관 부설및접합
h	파형강관 부설 및 접합(D800㎜)	m	1. 운반비 1) 운반비(현장도착도) 2) 하차비(10Ton,크레인) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 3) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 재료비 1) 파형강관(D800㎜):1.05m 2) 고재대:39.5㎏/m×0.05m = 1.975㎏ 3) 커플링밴드(D800㎜):1set/본/6.00m/본 = 0.167개/m 3. 노무비 1) 배관공(수도):0.24인/본/6.00m/본=0.040인/m 2) 보통인부:0.12인/본/6.00m/본=0.020인/m 4. 중기사용료(트럭탑재형크레인,5Ton) : 0.25hr/본/6.00m/본=0.042hr/m 5. 공구손료 및 잡재료비:인력품의 2%	[토목]6-7-2 파형강관 부설및접합
i	파형강관 부설 및 접합(D1,000㎜)	m	1. 운반비 1) 운반비(현장도착도) 2) 하차비(10Ton,크레인) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 3) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 재료비 1) 파형강관(D1,000㎜):1.05m 2) 고재대:62.1㎏/m×0.05m = 3.105㎏ 3) 커플링밴드(D1,000㎜):1set/본/6.00m/본 = 0.167개/m 3. 노무비 1) 배관공(수도):0.32인/본/6.00m/본=0.053인/m 2) 보통인부:0.16인/본/6.00m/본=0.027인/m 4. 중기사용료(트럭탑재형크레인,5Ton) : 0.30hr/본/6.00m/본=0.050hr/m 5. 공구손료 및 잡재료비:인력품의 2%	[토목]6-7-2 파형강관 부설및접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
j	파형강관 부설 및 접합(D1,200㎜)	m	1. 운반비 1) 운반비(현장도착도) 2) 하차비(10Ton,크레인) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 3) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 재료비 1) 파형강관(D1,200㎜):1.05m 2) 고재대:74.0㎏/m×0.05m = 3.700㎏ 3) 커플링밴드(D1,200㎜):1set/본/6.00m/본 = 0.167개/m 3. 노무비 1) 배관공(수도):0.39인/본/6.00m/본=0.065인/m 2) 보통인부:0.19인/본/6.00m/본=0.032인/m 4. 중기사용료(트럭탑재형크레인,5Ton) : 0.35hr/본/6.00m/본=0.058hr/m 5. 공구손료 및 잡재료비:인력품의 2%	[토목]6-7-2 파형강관 부설및접합
k	파형강관 부설 및 접합(D1,500㎜)	m	1. 운반비 1) 운반비(현장도착도) 2) 하차비(10Ton,크레인) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 3) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 재료비 1) 파형강관(D1,500㎜):1.05m 2) 고재대:120.4㎏/m×0.05m = 6.02㎏ 3) 커플링밴드(D1,500㎜):1set/본/6.00m/본 = 0.167개/m 3. 노무비 1) 배관공(수도):0.50인/본/6.00m/본=0.083인/m 2) 보통인부:0.25인/본/6.00m/본=0.042인/m 4. 중기사용료(트럭탑재형크레인,5Ton) : 0.43hr/본/6.00m/본=0.072hr/m 5. 공구손료 및 잡재료비:인력품의 2%	[토목]6-7-2 파형강관 부설및접합

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
9.02	강관부설 및 접합 (기계부설)
a	강관 부설 및 접합 (D300㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재:10.5Ton/대/0.291Ton/본 = 36회/대 - 묶기:30초/회×36회/대 = 1080초/대 - 회전:30초/회×36회/대 = 1080초/대 - 풀기:30초/회×36회/대 = 1080초/대 ∴ 계: (1080초/대+1080초/대+1080초/대)/60분 = 54분/대 2) 운반비 q1 = 6.00m/본×36회/대 = 216m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 54분/대(적재), t3 = 54분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분=68.57분/대 Cm = 54분+68.57분+54분+0.42분+1.50분 = 178.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 178.49분/대/(60분×1.00×0.90)/216m/대 = 0.015hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 강관부설 1) 재료비(D300㎜):1.05m 2) 고재대:291㎏/본/6.0m/본×0.05m = 2.425㎏ 3) 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 10본/일 ① 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ② 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ③ 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 6.00m/본 ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다. 3. 강관접합(A종 예시) 1) 노무비 ∴ 일당 시공량 Q = 6.5개소/일 - 용접공 : 1인/일 / Q 개소/일 / 6.00m/본 2) 공구손료 및 경장비(용접기, 발전기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% ※ 용접접합에 필요한 자재는 별도 계상한다. 4. 강관도장(외부) : 필요시 적용 1) 재료비 : 설계수량 적용 2) 노무비 - 도 장 공 : 0.18인/개소/6.00m/본 = 0.030인/m - 보통인부 : 0.04인/개소/6.00m/본 = 0.007인/m	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-3-1 강관 부설 [토목]6-3-2 강관 용접접합 [토목]6-3-3 강관 도장

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b	강관 부설 및 접합 (D350㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재:10.5Ton/대/0.310Ton/본 = 34회/대 - 묶기:30초/회×34회/대 = 1020초/대 - 회전:30초/회×34회/대 = 1020초/대 - 풀기:30초/회×34회/대 = 1020초/대 ∴ 계: (1020초/대+1020초/대+1020초/대)/60분 = 51분/대 2) 운반비 q1 = 6.00m/본×34회/대 = 204m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 51.0분/대(적재), t3 = 51.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분=68.57분/대 Cm = 51분+68.57분+51분+0.42분+1.50분 = 172.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 172.49분/대/(60분×1.00×0.90)/204m/대 = 0.016hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 강관부설 1) 재료비(D350㎜):1.05m 2) 고재대:310.38㎏/본/6.0m/본×0.05m = 2.586㎏ 3) 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 10본/일 ① 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ② 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ③ 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 6.00m/본 ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다. 3. 강관접합(A종 예시) 1) 노무비 ∴ 일당 시공량 Q = 5.5개소/일 - 용접공 : 1인/일 / Q 개소/일 / 6.00m/본 2) 공구손료 및 경장비(용접기, 발전기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% ※ 용접접합에 필요한 자재는 별도 계상한다. 4. 강관도장(외부) : 필요시 적용 1) 재료비 : 설계수량 적용 2) 노무비 - 도 장 공 : 0.21인/개소/6.00m/본 = 0.035인/m - 보통인부 : 0.05인/개소/6.00m/본 = 0.008인/m	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-3-1 강관 부설 [토목]6-3-2 강관 용접접합 [토목]6-3-3 강관 도장

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c	강관 부설 및 접합 (D400㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재:10.5Ton/대/0.355Ton/본 = 30회/대 - 묶기:30초/회×30회/대 = 900초/대 - 회전:30초/회×30회/대 = 900초/대 - 풀기:30초/회×30회/대 = 900초/대 ∴ 계: (900초/대+900초/대+900초/대)/60분 = 45분/대 2) 운반비 q1 = 6.00m/본×30회/대 = 180m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 45.0분/대(적재), t3 = 45.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분=68.57분/대 Cm = 45분+68.57분+45분+0.42분+1.50분 = 160.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 160.49분/대/(60분×1.00×0.90)/180m/대 = 0.017hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 강관부설 1) 재료비(D400㎜):1.05m 2) 고재대:355.44㎏/본/6.0m/본×0.05m = 2.962㎏ 3) 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 9본/일 ① 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ② 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ③ 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 6.00m/본 ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다. 3. 강관접합(A종 예시) 1) 노무비 ∴ 일당 시공량 Q = 9.5개소/일 - 용접공 : 2인/일 / Q 개소/일 / 6.00m/본 2) 공구손료 및 경장비(용접기, 발전기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% ※ 용접접합에 필요한 자재는 별도 계상한다. 4. 강관도장(외부) : 필요시 적용 1) 재료비 : 설계수량 적용 2) 노무비 - 도 장 공 : 0.23인/개소/6.00m/본 = 0.038인/m - 보통인부 : 0.06인/개소/6.00m/본 = 0.010인/m	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-3-1 강관 부설 [토목]6-3-2 강관 용접접합 [토목]6-3-3 강관 도장

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
d	강관 부설 및 접합 (D450㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재:10.5Ton/대/0.401Ton/본 = 26회/대 - 묶기:30초/회×26회/대 = 780초/대 - 회전:30초/회×26회/대 = 780초/대 - 풀기:30초/회×26회/대 = 780초/대 ∴ 계: (780초/대+780초/대+780초/대)/60분 = 39분/대 2) 운반비 q1 = 6.00m/본×26회/대 = 156m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 39.0분/대(적재), t3 = 39.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분=68.57분/대 Cm = 39분+68.57분+39분+0.42분+1.50분 = 148.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 148.49분/대/(60분×1.00×0.90)/156m/대 = 0.018hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 강관부설 1) 재료비(D450㎜):1.05m 2) 고재대:400.56㎏/본/6.0m/본×0.05m = 3.338㎏ 3) 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 8본/일 ① 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ② 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ③ 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 6.00m/본 ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다. 3. 강관접합(A종 예시) 1) 노무비 ∴ 일당 시공량 Q = 8.0개소/일 - 용접공 : 2인/일 / Q 개소/일 / 6.00m/본 2) 공구손료 및 경장비(용접기, 발전기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% ※ 용접접합에 필요한 자재는 별도 계상한다. 4. 강관도장(외부) : 필요시 적용 1) 재료비 : 설계수량 적용 2) 노무비 - 도 장 공 : 0.25인/개소/6.00m/본 = 0.042인/m - 보통인부 : 0.06인/개소/6.00m/본 = 0.010인/m	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-3-1 강관 부설 [토목]6-3-2 강관 용접접합 [토목]6-3-3 강관 도장

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
e	강관 부설 및 접합 (D500㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재:10.5Ton/대/0.446Ton/본 = 24회/대 - 묶기:30초/회×24회/대 = 720초/대 - 회전:30초/회×24회/대 = 720초/대 - 풀기:30초/회×24회/대 = 720초/대 ∴ 계: (720초/대+720초/대+720초/대)/60분 = 36분/대 2) 운반비 q1 = 6.00m/본×24회/대 = 144m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 36.0분/대(적재), t3 = 36.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분=68.57분/대 Cm = 36분+68.57분+36분+0.42분+1.50분 = 142.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 142.49분/대/(60분×1.00×0.90)/144m/대 = 0.018hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 강관부설 1) 재료비(D500㎜):1.05m 2) 고재대:445.68㎏/본/6.0m/본×0.05m = 3.714㎏ 3) 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 7본/일 ① 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ② 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ③ 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 6.00m/본 ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다. 3. 강관접합(A종 예시) 1) 노무비 ∴ 일당 시공량 Q = 6.5개소/일 - 용접공 : 2인/일 / Q 개소/일 / 6.00m/본 2) 공구손료 및 경장비(용접기, 발전기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% ※ 용접접합에 필요한 자재는 별도 계상한다. 4. 강관도장(외부) : 필요시 적용 1) 재료비 : 설계수량 적용 2) 노무비 - 도 장 공 : 0.27인/개소/6.00m/본 = 0.045인/m - 보통인부 : 0.07인/개소/6.00m/본 = 0.012인/m	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-3-1 강관 부설 [토목]6-3-2 강관 용접접합 [토목]6-3-3 강관 도장

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
f	강관 부설 및 접합 (D600㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재:10.5Ton/대/0.536Ton/본 = 20회/대 - 묶기:30초/회×20회/대 = 600초/대 - 회전:30초/회×20회/대 = 600초/대 - 풀기:30초/회×20회/대 = 600초/대 ∴ 계: (600초/대+600초/대+600초/대)/60분 = 30분/대 2) 운반비 q1 = 6.00m/본×20회/대 = 120m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 30.0분/대(적재), t3 = 30.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분=68.57분/대 Cm = 30분+68.57분+30분+0.42분+1.50분 = 130.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 130.49분/대/(60분×1.00×0.90)/120m/대 = 0.020hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 강관부설 1) 재료비(D600㎜):1.05m 2) 고재대:535.86㎏/본/6.0m/본×0.05m = 4.465㎏ 3) 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 6본/일 ① 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ② 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ③ 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 6.00m/본 ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다. 3. 강관접합(A종 예시) 1) 노무비 ∴ 일당 시공량 Q = 5.0개소/일 - 용접공 : 2인/일 / Q 개소/일 / 6.00m/본 2) 공구손료 및 경장비(용접기, 발전기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% ※ 용접접합에 필요한 자재는 별도 계상한다. 4. 강관도장(외부) : 필요시 적용 1) 재료비 : 설계수량 적용 2) 노무비 - 도 장 공 : 0.30인/개소/6.00m/본 = 0.050인/m - 보통인부 : 0.07인/개소/6.00m/본 = 0.012인/m	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-3-1 강관 부설 [토목]6-3-2 강관 용접접합 [토목]6-3-3 강관 도장

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
g	강관 부설 및 접합 (D700㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재:10.5Ton/대/0.626Ton/본 = 17회/대 - 묶기:30초/회×17회/대 = 510초/대 - 회전:30초/회×17회/대 = 510초/대 - 풀기:30초/회×17회/대 = 510초/대 ∴ 계: (510초/대+510초/대+510초/대)/60분 = 26분/대 2) 운반비 q1 = 6.00m/본×17회/대 = 102m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 26.0분/대(적재), t3 = 26.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분=68.57분/대 Cm = 26분+68.57분+26분+0.42분+1.50분 = 122.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 122.49분/대/(60분×1.00×0.90)/102m/대 = 0.022hr/m 3) 하차비(크레인,10Ton) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 강관부설 1) 재료비(D700㎜):1.05m 2) 고재대:626.04㎏/본/6.0m/본×0.05m = 5.217㎏ 3) 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 5본/일 ① 배관공(수도) : 2인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ② 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ③ 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 6.00m/본 ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다. 3. 강관접합(A종 예시) 1) 노무비 ∴ 일당 시공량 Q = 3.5개소/일 - 용접공 : 2인/일 / Q 개소/일 / 6.00m/본 2) 공구손료 및 경장비(용접기, 발전기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% ※ 용접접합에 필요한 자재는 별도 계상한다. 4. 강관도장(외부) : 필요시 적용 1) 재료비 : 설계수량 적용 2) 노무비 - 도 장 공 : 0.32인/개소/6.00m/본 = 0.053인/m - 보통인부 : 0.08인/개소/6.00m/본 = 0.013인/m	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-3-1 강관 부설 [토목]6-3-2 강관 용접접합 [토목]6-3-3 강관 도장

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
h	강관 부설 및 접합 (D800㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재:10.5Ton/대/0.835Ton/본 = 13회/대 - 묶기:30초/회×13회/대 = 390초/대 - 회전:30초/회×13회/대 = 390초/대 - 풀기:30초/회×13회/대 = 390초/대 ∴ 계: (390초/대+390초/대+390초/대)/60분 = 20분/대 2) 운반비 q1 = 6.00m/본×13회/대 = 78m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 20.0분/대(적재), t3 = 20.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분=68.57분/대 Cm = 20분+68.57분+20분+0.42분+1.50분 = 110.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 110.49분/대/(60분×1.00×0.90)/78m/대 = 0.026hr/m 3) 하차비(크레인,15Ton) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 강관부설 1) 재료비(D800㎜):1.05m 2) 고재대:834.6㎏/본/6.0m/본×0.05m = 6.955㎏ 3) 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 5.5본/일 ① 배관공(수도) : 3인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ② 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ③ 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 6.00m/본 ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다. 3. 강관접합(B종 예시) 1) 노무비 ∴ 일당 시공량 Q = 4.0개소/일 - 용접공 : 3인/일 / Q 개소/일 / 6.00m/본 2) 공구손료 및 경장비(용접기, 발전기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% ※ 용접접합에 필요한 자재는 별도 계상한다. 4. 강관도장 : 필요시 적용 1) 내부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.27인/개소/6.00m/본 = 0.045인/m - 보통인부 : 0.07인/개소/6.00m/본 = 0.012인/m 2) 외부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.34인/개소/6.00m/본 = 0.057인/m - 보통인부 : 0.08인/개소/6.00m/본 = 0.013인/m	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-3-1 강관 부설 [토목]6-3-2 강관 용접접합 [토목]6-3-3 강관 도장

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
i	강관 부설 및 접합 (D900㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재:10.5Ton/대/0.940Ton/본 = 11회/대 - 묶기:30초/회×11회/대 = 330초/대 - 회전:30초/회×11회/대 = 330초/대 - 풀기:30초/회×11회/대 = 330초/대 ∴ 계: (330초/대+330초/대+330초/대)/60분 = 17분/대 2) 운반비 q1 = 6.00m/본×11회/대 = 66m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 17.0분/대(적재), t3 = 17.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분=68.57분/대 Cm = 17분+68.57분+17분+0.42분+1.50분 = 104.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 104.49분/대/(60분×1.00×0.90)/66m/대 = 0.029hr/m 3) 하차비(크레인,15Ton) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 강관부설 1) 재료비(D900㎜):1.05m 2) 고재대:939.84㎏/본/6.0m/본×0.05m = 7.832㎏ 3) 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 4.5본/일 ① 배관공(수도) : 3인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ② 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ③ 양중장비 (예시:크레인 10ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 6.00m/본 ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다. 3. 강관접합(B종 예시) 1) 노무비 ∴ 일당 시공량 Q = 3.0개소/일 - 용접공 : 3인/일 / Q 개소/일 / 6.00m/본 2) 공구손료 및 경장비(용접기, 발전기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% ※ 용접접합에 필요한 자재는 별도 계상한다. 4. 강관도장 : 필요시 적용 1) 내부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.28인/개소/6.00m/본 = 0.047인/m - 보통인부 : 0.07인/개소/6.00m/본 = 0.012인/m 2) 외부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.36인/개소/6.00m/본 = 0.060인/m - 보통인부 : 0.09인/개소/6.00m/본 = 0.015인/m	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-3-1 강관 부설 [토목]6-3-2 강관 용접접합 [토목]6-3-3 강관 도장

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
j	강관 부설 및 접합 (D1,000㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재:10.5Ton/대/1.193Ton/본 = 9회/대 - 묶기:30초/회×9회/대 = 270초/대 - 회전:30초/회×9회/대 = 270초/대 - 풀기:30초/회×9회/대 = 270초/대 ∴ 계: (270초/대+270초/대+270초/대)/60분 = 14분/대 2) 운반비 q1 = 6.00m/본×9회/대 = 54m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 14.0분/대(적재), t3 = 14.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분=68.57분/대 Cm = 14분+68.57분+14분+0.42분+1.50분 = 98.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 98.49분/대/(60분×1.00×0.90)/54m/대 = 0.034hr/m 3) 하차비(크레인,15Ton) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 강관부설 1) 재료비(D1,000㎜):1.05m 2) 고재대:1,193.16㎏/본/6.0m/본×0.05m = 9.943㎏ 3) 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 3.5본/일 ① 배관공(수도) : 3인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ② 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ③ 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 6.00m/본 ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다. 3. 강관접합(B종 예시) 1) 노무비 ∴ 일당 시공량 Q = 2.5개소/일 - 용접공 : 3인/일 / Q 개소/일 / 6.00m/본 2) 공구손료 및 경장비(용접기, 발전기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% ※ 용접접합에 필요한 자재는 별도 계상한다. 4. 강관도장 : 필요시 적용 1) 내부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.30인/개소/6.00m/본 = 0.050인/m - 보통인부 : 0.07인/개소/6.00m/본 = 0.012인/m 2) 외부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.38인/개소/6.00m/본 = 0.063인/m - 보통인부 : 0.09인/개소/6.00m/본 = 0.015인/m	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-3-1 강관 부설 [토목]6-3-2 강관 용접접합 [토목]6-3-3 강관 도장

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
k	강관 부설 및 접합 (D1,100㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재:10.5Ton/대/1.313Ton/본 = 8회/대 - 묶기:30초/회×8회/대 = 240초/대 - 회전:30초/회×8회/대 = 240초/대 - 풀기:30초/회×8회/대 = 240초/대 ∴ 계: (240초/대+240초/대+240초/대)/60분 = 12분/대 2) 운반비 q1 = 6.00m/본×8회/대 = 48m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 12.0분/대(적재), t3 = 12.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분=68.57분/대 Cm = 12분+68.57분+12분+0.42분+1.50분 = 94.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 94.49분/대/(60분×1.00×0.90)/48m/대 = 0.036hr/m 3) 하차비(크레인,15Ton) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 강관부설 1) 재료비(D1,100㎜):1.05m 2) 고재대:1,313.4㎏/본/6.0m/본×0.05m = 10.945㎏ 3) 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 3.0본/일 ① 배관공(수도) : 3인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ② 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ③ 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 6.00m/본 ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다. 3. 강관접합(B종 예시) 1) 노무비 ∴ 일당 시공량 Q = 2.0개소/일 - 용접공 : 3인/일 / Q 개소/일 / 6.00m/본 2) 공구손료 및 경장비(용접기, 발전기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% ※ 용접접합에 필요한 자재는 별도 계상한다. 4. 강관도장 : 필요시 적용 1) 내부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.31인/개소/6.00m/본 = 0.052인/m - 보통인부 : 0.08인/개소/6.00m/본 = 0.013인/m 2) 외부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.40인/개소/6.00m/본 = 0.067인/m - 보통인부 : 0.10인/개소/6.00m/본 = 0.017인/m	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-3-1 강관 부설 [토목]6-3-2 강관 용접접합 [토목]6-3-3 강관 도장

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
l	강관 부설 및 접합 (D1,200㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재:10.5Ton/대/1.612Ton/본 = 7회/대 - 묶기:30초/회×7회/대 = 210초/대 - 회전:30초/회×7회/대 = 210초/대 - 풀기:30초/회×7회/대 = 210초/대 ∴ 계: (210초/대+210초/대+210초/대)/60분 = 11분/대 2) 운반비 q1 = 6.00m/본×7회/대 = 42m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 11.0분/대(적재), t3 = 11.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분=68.57분/대 Cm = 11분+68.57분+11분+0.42분+1.50분 = 92.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 92.49분/대/(60분×1.00×0.90)/42m/대 = 0.041hr/m 3) 하차비(크레인,15Ton) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 강관부설 1) 재료비(D1,200㎜):1.05m 2) 고재대:1,611.54㎏/본/6.0m/본×0.05m = 13.429㎏ 3) 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 2.5본/일 ① 배관공(수도) : 3인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ② 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ③ 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 6.00m/본 ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다. 3. 강관접합(B종 예시) 1) 노무비 ∴ 일당 시공량 Q = 2.0개소/일 - 용접공 : 3인/일 / Q 개소/일 / 6.00m/본 2) 공구손료 및 경장비(용접기, 발전기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% ※ 용접접합에 필요한 자재는 별도 계상한다. 4. 강관도장 : 필요시 적용 1) 내부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.32인/개소/6.00m/본 = 0.053인/m - 보통인부 : 0.08인/개소/6.00m/본 = 0.013인/m 2) 외부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.41인/개소/6.00m/본 = 0.068인/m - 보통인부 : 0.10인/개소/6.00m/본 = 0.017인/m	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-3-1 강관 부설 [토목]6-3-2 강관 용접접합 [토목]6-3-3 강관 도장

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
m	강관 부설 및 접합 (D1,350㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재:10.5Ton/대/2.015Ton/본 = 5회/대 - 묶기:30초/회×5회/대 = 150초/대 - 회전:30초/회×5회/대 = 150초/대 - 풀기:30초/회×5회/대 = 150초/대 ∴ 계: (150초/대+150초/대+150초/대)/60분 = 8분/대 2) 운반비 q1 = 6.00m/본×5회/대 = 30m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 8.0분/대(적재), t3 = 8.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분=68.57분/대 Cm = 8분+68.57분+8분+0.42분+1.50분 = 86.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 86.49분/대/(60분×1.00×0.90)/30m/대 = 0.053hr/m 3) 하차비(크레인,15Ton) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 강관부설 1) 재료비(D1,350㎜):1.05m 2) 고재대:2,014.62㎏/본/6.0m/본×0.05m = 16.788㎏ 3) 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 2.0본/일 ① 배관공(수도) : 3인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ② 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ③ 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 6.00m/본 ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다. 3. 강관접합(B종 예시) 1) 노무비 ∴ 일당 시공량 Q = 1.5개소/일 - 용접공 : 3인/일 / Q 개소/일 / 6.00m/본 2) 공구손료 및 경장비(용접기, 발전기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% ※ 용접접합에 필요한 자재는 별도 계상한다. 4. 강관도장 : 필요시 적용 1) 내부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.33인/개소/6.00m/본 = 0.055인/m - 보통인부 : 0.08인/개소/6.00m/본 = 0.013인/m 2) 외부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.43인/개소/6.00m/본 = 0.072인/m - 보통인부 : 0.11인/개소/6.00m/본 = 0.018인/m	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-3-1 강관 부설 [토목]6-3-2 강관 용접접합 [토목]6-3-3 강관 도장

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
n	강관 부설 및 접합 (D1,500㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재:10.5Ton/대/2.463Ton/본 = 4회/대 - 묶기:30초/회×4회/대 = 120초/대 - 회전:30초/회×4회/대 = 120초/대 - 풀기:30초/회×4회/대 = 120초/대 ∴ 계: (120초/대+120초/대+120초/대)/60분 = 6분/대 2) 운반비 q1 = 6.00m/본×4회/대 = 24m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 6.0분/대(적재), t3 = 6.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분=68.57분/대 Cm = 6분+68.57분+6분+0.42분+1.50분 = 82.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 82.49분/대/(60분×1.00×0.90)/24m/대 = 0.064hr/m 3) 하차비(크레인,25Ton) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 강관부설 1) 재료비(D1,500㎜):1.05m 2) 고재대:2,462.52㎏/본/6.0m/본×0.05m = 20.521㎏ 3) 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 2.0본/일 ① 배관공(수도) : 3인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ② 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ③ 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 6.00m/본 ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다. 3. 강관접합(B종 예시) 1) 노무비 ∴ 일당 시공량 Q = 1.5개소/일 - 용접공 : 3인/일 / Q 개소/일 / 6.00m/본 2) 공구손료 및 경장비(용접기, 발전기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% ※ 용접접합에 필요한 자재는 별도 계상한다. 4. 강관도장 : 필요시 적용 1) 내부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.35인/개소/6.00m/본 = 0.058인/m - 보통인부 : 0.09인/개소/6.00m/본 = 0.015인/m 2) 외부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.45인/개소/6.00m/본 = 0.075인/m - 보통인부 : 0.11인/개소/6.00m/본 = 0.018인/m	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-3-1 강관 부설 [토목]6-3-2 강관 용접접합 [토목]6-3-3 강관 도장

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
o	강관 부설 및 접합 (D1,650㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재:10.5Ton/대/2.955Ton/본 = 4회/대 - 묶기:30초/회×4회/대 = 120초/대 - 회전:30초/회×4회/대 = 120초/대 - 풀기:30초/회×4회/대 = 120초/대 ∴ 계: (120초/대+120초/대+120초/대)/60분 = 6분/대 2) 운반비 q1 = 6.00m/본×4회/대 = 24m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 6.0분/대(적재), t3 = 6.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분=68.57분/대 Cm = 6분+68.57분+6분+0.42분+1.50분 = 82.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 82.49분/대/(60분×1.00×0.90)/24m/대 = 0.064hr/m 3) 하차비(크레인,25Ton) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 강관부설 1) 재료비(D1,650㎜):1.05m 2) 고재대:2,955.18㎏/본/6.0m/본×0.05m = 24.626㎏ 3) 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 1.5본/일 ① 배관공(수도) : 3인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ② 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ③ 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 6.00m/본 ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다. 3. 강관접합(B종 예시) 1) 노무비 ∴ 일당 시공량 Q = 1.5개소/일 - 용접공 : 3인/일 / Q 개소/일 / 6.00m/본 2) 공구손료 및 경장비(용접기, 발전기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% ※ 용접접합에 필요한 자재는 별도 계상한다. 4. 강관도장 : 필요시 적용 1) 내부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.36인/개소/6.00m/본 = 0.060인/m - 보통인부 : 0.09인/개소/6.00m/본 = 0.015인/m 2) 외부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.46인/개소/6.00m/본 = 0.077인/m - 보통인부 : 0.11인/개소/6.00m/본 = 0.018인/m	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-3-1 강관 부설 [토목]6-3-2 강관 용접접합 [토목]6-3-3 강관 도장

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
p	강관 부설 및 접합 (D1,800㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재:10.5Ton/대/3.493Ton/본 = 3회/대 - 묶기:30초/회×3회/대 = 90초/대 - 회전:30초/회×3회/대 = 90초/대 - 풀기:30초/회×3회/대 = 90초/대 ∴ 계: (90초/대+90초/대+90초/대)/60분 = 5분/대 2) 운반비 q1 = 6.00m/본×3회/대 = 18m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 5.0분/대(적재), t3 = 5.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분=68.57분/대 Cm = 5분+68.57분+5분+0.42분+1.50분 = 80.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 80.49분/대/(60분×1.00×0.90)/18m/대 = 0.083hr/m 3) 하차비(크레인,25Ton) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 강관부설 1) 재료비(D1,800㎜):1.05m 2) 고재대:3,492.66㎏/본/6.0m/본×0.05m = 29.105㎏ 3) 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 1.5본/일 ① 배관공(수도) : 4인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ② 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ③ 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 6.00m/본 ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다. 3. 강관접합(B종 예시) 1) 노무비 ∴ 일당 시공량 Q = 1.5개소/일 - 용접공 : 4인/일 / Q 개소/일 / 6.00m/본 2) 공구손료 및 경장비(용접기, 발전기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% ※ 용접접합에 필요한 자재는 별도 계상한다. 4. 강관도장 : 필요시 적용 1) 내부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.37인/개소/6.00m/본 = 0.062인/m - 보통인부 : 0.09인/개소/6.00m/본 = 0.015인/m 2) 외부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.48인/개소/6.00m/본 = 0.080인/m - 보통인부 : 0.12인/개소/6.00m/본 = 0.020인/m	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-3-1 강관 부설 [토목]6-3-2 강관 용접접합 [토목]6-3-3 강관 도장

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
q	강관 부설 및 접합 (D2,000㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재:10.5Ton/대/4.477Ton/본 = 2회/대 - 묶기:30초/회×2회/대 = 60초/대 - 회전:30초/회×2회/대 = 60초/대 - 풀기:30초/회×2회/대 = 60초/대 ∴ 계: (60초/대+60초/대+60초/대)/60분 = 3분/대 2) 운반비 q1 = 6.00m/본×2회/대 = 12m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 3.0분/대(적재), t3 = 3.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분=68.57분/대 Cm = 3분+68.57분+3분+0.42분+1.50분 = 76.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 76.49분/대/(60분×1.00×0.90)/12m/대 = 0.118hr/m 3) 하차비(크레인,25Ton) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 강관부설 1) 재료비(D2,000㎜):1.05m 2) 고재대:4,476.54㎏/본/6.0m/본×0.05m = 37.304㎏ 3) 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 1.5본/일 ① 배관공(수도) : 4인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ② 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ③ 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 6.00m/본 ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다. 3. 강관접합(B종 예시) 1) 노무비 ∴ 일당 시공량 Q = 1.5개소/일 - 용접공 : 4인/일 / Q 개소/일 / 6.00m/본 2) 공구손료 및 경장비(용접기, 발전기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% ※ 용접접합에 필요한 자재는 별도 계상한다. 4. 강관도장 : 필요시 적용 1) 내부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.39인/개소/6.00m/본 = 0.065인/m - 보통인부 : 0.09인/개소/6.00m/본 = 0.015인/m 2) 외부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.49인/개소/6.00m/본 = 0.082인/m - 보통인부 : 0.12인/개소/6.00m/본 = 0.020인/m	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-3-1 강관 부설 [토목]6-3-2 강관 용접접합 [토목]6-3-3 강관 도장

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
r	강관 부설 및 접합 (D2,200㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재:10.5Ton/대/5.256Ton/본 = 2회/대 - 묶기:30초/회×2회/대 = 60초/대 - 회전:30초/회×2회/대 = 60초/대 - 풀기:30초/회×2회/대 = 60초/대 ∴ 계: (60초/대+60초/대+60초/대)/60분 = 3분/대 2) 운반비 q1 = 6.00m/본×2회/대 = 12m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 3.0분/대(적재), t3 = 3.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분=68.57분/대 Cm = 3분+68.57분+3분+0.42분+1.50분 = 76.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 76.49분/대/(60분×1.00×0.90)/12m/대 = 0.118hr/m 3) 하차비(크레인,25Ton) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 강관부설 1) 재료비(D2,200㎜):1.05m 2) 고재대:5,256㎏/본/6.0m/본×0.05m = 43.800㎏ 3) 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 1.5본/일 ① 배관공(수도) : 4인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ② 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ③ 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 6.00m/본 ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다. 3. 강관접합(B종 예시) 1) 노무비 ∴ 일당 시공량 Q = 1.5개소/일 - 용접공 : 4인/일 / Q 개소/일 / 6.00m/본 2) 공구손료 및 경장비(용접기, 발전기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% ※ 용접접합에 필요한 자재는 별도 계상한다. 4. 강관도장 : 필요시 적용 1) 내부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.40인/개소/6.00m/본 = 0.067인/m - 보통인부 : 0.10인/개소/6.00m/본 = 0.017인/m 2) 외부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.51인/개소/6.00m/본 = 0.085인/m - 보통인부 : 0.13인/개소/6.00m/본 = 0.022인/m	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-3-1 강관 부설 [토목]6-3-2 강관 용접접합 [토목]6-3-3 강관 도장

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
s	강관 부설 및 접합 (D2,400㎜)	m	1. 운반(덤프트럭 10.5Ton,트럭 20㎞이내) 1) 적재:10.5Ton/대/6.444Ton/본 = 2회/대 - 묶기:30초/회×2회/대 = 60초/대 - 회전:30초/회×2회/대 = 60초/대 - 풀기:30초/회×2회/대 = 60초/대 ∴ 계: (60초/대+60초/대+60초/대)/60분 = 3분/대 2) 운반비 q1 = 6.00m/본×2회/대 = 12m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 3.0분/대(적재), t3 = 3.0분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분=68.57분/대 Cm = 3분+68.57분+3분+0.42분+1.50분 = 76.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 76.49분/대/(60분×1.00×0.90)/12m/대 = 0.118hr/m 3) 하차비(크레인,25Ton) q0 = 6.00m/본, f = 1.00, E = 0.50 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90초/본/(3600초×1.00×0.50)/6.00m/본 = 0.008hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴ 1일 실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일×0.008hr/m = 0.002인/m 2. 강관부설 1) 재료비(D2,400㎜):1.05m 2) 고재대:6,444㎏/본/6.0m/본×0.05m = 53.700㎏ 3) 관부설 ∴ 일당 시공량 Q = 1.0본/일 ① 배관공(수도) : 4인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ② 보통인부 : 1인/일 / Q 본/일 / 6.00m/본 ③ 양중장비 (예시:크레인 15ton) : 1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 6.00m/본 ※ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다. 3. 강관접합(B종 예시) 1) 노무비 ∴ 일당 시공량 Q = 1.0개소/일 - 용접공 : 4인/일 / Q 개소/일 / 6.00m/본 2) 공구손료 및 경장비(용접기, 발전기 등)의 기계경비 : 인력품의 6% ※ 용접접합에 필요한 자재는 별도 계상한다. 4. 강관도장 : 필요시 적용 1) 내부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.41인/개소/6.00m/본 = 0.068인/m - 보통인부 : 0.10인/개소/6.00m/본 = 0.017인/m 2) 외부 ① 재료비 : 설계수량 적용 ② 노무비 - 도 장 공 : 0.53인/개소/6.00m/본 = 0.088인/m - 보통인부 : 0.13인/개소/6.00m/본 = 0.022인/m	[공통]8-2-8 덤프트럭 [토목]6-3-1 강관 부설 [토목]6-3-2 강관 용접접합 [토목]6-3-3 강관 도장

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
9	정거장 표면배수공
9.01	관기초공
a	콘크리트타설
a-1	바닥콘크리트타설 (무근,펌프차 ,슬럼프15cm, Type-Ⅰ)	㎥	“2. 수로공 2.01 현장타설콘크리트수로 a-1 바닥콘크리트타설” 참조
a-2	소형콘크리트타설 (무근, 장비사용타설)	㎥	“4. 집수정공 4.01 콘크리트타설 a 소형콘크리트타설” 참조
a-3	소형콘크리트타설 (철근, 장비사용타설)	㎥	“4. 집수정공 4.01 콘크리트타설 b 소형콘크리트타설” 참조
a-4	기초콘크리트타설 (무근,펌프차 ,슬럼프15cm, Type-Ⅲ)	㎥	“2. 수로공 2.01 현장타설콘크리트수로 a-3 구체콘크리트타설” 참조
a-5	구체콘크리트타설 (철근,펌프차 ,슬럼프15cm, Type-Ⅲ)	㎥	“2. 수로공 2.01 현장타설콘크리트수로 a-4 구체콘크리트타설” 참조
b	거푸집
b-1	합판거푸집 (6회,H=0～7m)	㎡	“2. 수로공 2.01 현장타설콘크리트수로 b 거푸집 b-1 합판거 푸집” 참조
b-2	합판거푸집 (4회,H=0～7m)	㎡	“3. 도수로공 3.02 거푸집 b 합판거푸집” 참조
b-3	합판거푸집 (3회,H=0～7m)	㎡	“3. 도수로공 3.02 거푸집 c 합판거푸집” 참조
b-4	유로폼 (벽체,보통,H=0～7m)	㎡	“2. 수로공 2.01 현장타설콘크리트수로 b 거푸집 b-2 유로폼”참조
b-5	원형거푸집 (3회,H = 0～7m)	㎡	1. 원형거푸집(H=0∼7m이하) 1) 재료비:원형 1회 사용재료비의 42.0% 적용 2) 노무비:원형 1회 사용인력품의 51.5% 적용 2. 원형거푸집(H=7∼10m이하) 1) 재료비(3회,H=0∼7m):100% 적용 2) 노무비(3회,H=0∼7m):110% 적용	2016년 건설표준품셈 6-3-3 원형거푸집
b-6	PE원형맨홀거푸집 (D900mm)	개소	“5. 맨홀공 5.03 a P.E원형맨홀거푸집” 참조
b-7	PE원형맨홀거푸집 (D1,200mm)	개소	“5. 맨홀공 5.03 b P.E원형맨홀거푸집” 참조
c	강관비계(3개월)
c-1	강관비계 (3개월,H=10m이하)	㎡	“4. 집수정공 4.04 강관비계(3개월) a 강관비계” 참조
c-2	강관비계 (3개월,H=10m초과～20m이하)	㎡	“4. 집수정공 4.04 강관비계(3개월) b 강관비계” 참조
c-3	강관비계 (3개월,H=20m초과～30m이하)	㎡	“4. 집수정공 4.04 강관비계(3개월) c 강관비계” 참조

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
d	가설계단
d-1	경사형 (3개월,H=6m이하)	㎡	“4. 집수정공 4.05 가설계단 a 경사형” 참조
d-2	타워형 (3개월)	㎡	“4. 집수정공 4.05 가설계단 b 타워형” 참조
e	사다리설치 (발디딤쇠,D22mm)	개	“4. 집수정공 4.06 사다리설치” 참조
f	맨홀뚜껑설치
f-1	맨홀뚜껑설치 (D648mm,차도용)	개	“5. 맨홀공 6.05 a 맨홀뚜껑설치” 참조
f-2	맨홀뚜껑설치 (D648mm,보도용)	개	“5. 맨홀공 6.05 b 맨홀뚜껑설치” 참조
g	스틸그레이팅설치 (각종)	개	“4. 집수정공 5.07 스틸그레이팅설치” 참조
h	철근현장가공및조립
h-1	철근현장가공조립 (Type-Ⅰ-1)	ton	“2. 수로공 2.01 현장타설콘크리트수로 f-1 철근현장가공조립” 참조
h-2	철근현장가공조립 (Type-Ⅰ-2)	ton	“2. 수로공 2.01 현장타설콘크리트수로 f-2 철근현장가공조립” 참조
9.02	콘크리트관부설
a	수밀밴드 접합 및 부설
a-1	수밀밴드 접합 및 부설(D250mm)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.02 a 수밀밴드 접합 및 부설” 참조
a-2	수밀밴드 접합 및 부설(D300㎜)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.02 b 수밀밴드 접합 및 부설” 참조
a-3	수밀밴드 접합 및 부설(D350㎜)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.02 c 수밀밴드 접합 및 부설” 참조
a-4	수밀밴드 접합 및 부설(D400㎜)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.02 d 수밀밴드 접합 및 부설” 참조
a-5	수밀밴드 접합 및 부설(D450㎜)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.02 e 수밀밴드 접합 및 부설” 참조
a-6	수밀밴드 접합 및 부설(D500㎜)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.02 f 수밀밴드 접합 및 부설” 참조
a-7	수밀밴드 접합 및 부설(D600㎜)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.02 g 수밀밴드 접합 및 부설” 참조

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
a-8	수밀밴드 접합 및 부설(D700㎜)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.02 h 수밀밴드 접합 및 부설” 참조
a-9	수밀밴드 접합 및 부설(D800㎜)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.02 i 수밀밴드 접합 및 부설” 참조
a-10	수밀밴드 접합 및 부설(D900㎜)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.02 j 수밀밴드 접합 및 부설” 참조
a-11	수밀밸트식 접합 및 부설(D1,000㎜)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.02 k 수밀밴드 접합 및 부설” 참조
a-12	수밀밴드 접합 및 부설(D1,100㎜)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.02 l 수밀밴드 접합 및 부설” 참조
a-13	수밀밴드 접합 및 부설(D1,200㎜)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.02 m 수밀밴드 접합 및 부설” 참조
b	진동 및 전압 철근 콘크리트관(VR관)
b-1	VR관 접합 및 부설 (D400mm)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.03 a 진동 및 전압 철근콘크리트관 (VR관)” 참조
b-2	VR관 접합 및 부설 (D450mm)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.03 b 진동 및 전압 철근콘크리트관 (VR관)” 참조
b-3	VR관 접합 및 부설 (D500mm)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.03 c 진동 및 전압 철근콘크리트관 (VR관)” 참조
b-4	VR관 접합 및 부설 (D600mm)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.03 d 진동 및 전압 철근콘크리트관 (VR관)” 참조
b-5	VR관 접합 및 부설 (D700mm)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.03 e 진동 및 전압 철근콘크리트관 (VR관)” 참조
b-6	VR관 접합 및 부설 (D800mm)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.03 f 진동 및 전압 철근콘크리트관 (VR관)” 참조
b-7	VR관 접합 및 부설 (D900mm)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.03 g 진동 및 전압 철근콘크리트관 (VR관)” 참조
b-8	VR관 접합 및 부설 (D1,000mm)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.03 h 진동 및 전압 철근콘크리트관 (VR관)” 참조
b-9	VR관 접합 및 부설 (D1,100mm)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.03 i 진동 및 전압 철근콘크리트관7 (VR관)” 참조
b-10	VR관 접합 및 부설 (D1,200mm)	m	“7. 콘크리트관(흄관) 7.03 j 진동 및 전압 철근콘크리트관 (VR관)” 참조

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c	원심력사각수로관부설
c-1	원심력사각수로관부설 (D300,400×400×2,500mm)	m	1. 운반(덤프트럭10.5ton 트럭,20㎞이내) 1) 적재:10.5ton/대/0.594ton/본 = 18회/대 - 묶 기:30초/회/×18회/대 = 540초/대 - 회 전:30초/회/×18회/대 = 540초/대 - 풀 기:30초/회/×18회/대 = 540초/대 계:(540.00초/대+540.00초/대+540.00초/대)/60분 = 27분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×18회/대 = 45m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 27분/대(적재), t3 = 27분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 27분/대+68.57분/대+27분/대+0.42분/대+1.50분/대= 124.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 124.49분/대(60분×1.00×0.90)/45.00m/대 = 0.051hr/m 3) 하차비(10ton,크레인) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90.00초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴1일실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일/×0.010hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비:원심력수로관(D300㎜):1.03m 3. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 42본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [공통]6-7-1 플륨관설치

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c-2	원심력사각수로관부설 (D350,460×460×2,500mm)	m	1. 운반(덤프트럭10.5ton 트럭,20㎞이내) 1) 적재:10.5ton/대/0.725ton/본 = 14회/대 - 묶 기:30초/회/×14회/대 = 420초/대 - 회 전:30초/회/×14회/대 = 420초/대 - 풀 기:30초/회/×14회/대 = 420초/대 계:(420.00초/대+420.00초/대+420.00초/대)/60분 = 21분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×14회/대 = 35m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 21분/대(적재), t3 = 21분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 21분/대+68.57분/대+21분/대+0.42분/대+1.50분/대= 112.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 112.49분/대(60분×1.00×0.90)/35.00m/대 = 0.060hr/m 3) 하차비(10ton,크레인) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90.00초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴1일실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일/×0.010hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비:원심력수로관(D350㎜):1.03m 3. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 36본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [공통] 6-7-1 플륨관설치

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c-3	원심력사각수로관부설 (D400,520×520×2,500mm)	m	1. 운반(덤프트럭10.5ton 트럭,20㎞이내) 1) 적재:10.5ton/대/0.917ton/본 = 11회/대 - 묶 기:30초/회/×11회/대 = 330초/대 - 회 전:30초/회/×11회/대 = 330초/대 - 풀 기:30초/회/×11회/대 = 330초/대 계:(330.00초/대+330.00초/대+330.00초/대)/60분 = 17분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×11회/대 = 27.5m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 17분/대(적재), t3 = 17분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 17분/대+68.57분/대+17분/대+0.42분/대+1.50분/대= 104.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 104.49분/대(60분×1.00×0.90)/27.50m/대 = 0.070hr/m 3) 하차비(10ton,크레인) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90.00초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴1일실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일/×0.010hr/m = 0.025인/m 2. 재료비:원심력수로관(D400㎜):1.03m 3. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 31본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [공통]6-7-1 플륨관설치

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c-4	원심력사각수로관부설 (D450,580×580×2,500mm)	m	1. 운반(덤프트럭10.5ton 트럭,20㎞이내) 1) 적재:10.5ton/대/1.074ton/본 = 10회/대 - 묶 기:30초/회/×10회/대 = 300초/대 - 회 전:30초/회/×10회/대 = 300초/대 - 풀 기:30초/회/×10회/대 = 300초/대 계:(300.00초/대+300.00초/대+300.00초/대)/60분 = 15분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×10회/대 = 25.0m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 15분/대(적재), t3 = 15분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 15분/대+68.57분/대+15분/대+0.42분/대+1.50분/대= 100.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 100.49분/대(60분×1.00×0.90)/25.0m/대 = 0.074hr/m 3) 하차비(10ton,크레인) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90.00초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴1일실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일/×0.010hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비:원심력수로관(D450㎜):1.03m 3. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 31본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [공통]6-7-1 플륨관설치

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c-5	원심력사각수로관부설 (D500,640×640×2,500mm)	m	1. 운반(덤프트럭10.5ton 트럭,20㎞이내) 1) 적재:10.5ton/대/1.285ton/본 = 8회/대 - 묶 기:30초/회/×8회/대 = 240초/대 - 회 전:30초/회/×8회/대 = 240초/대 - 풀 기:30초/회/×8회/대 = 240초/대 계:(240.00초/대+240.00초/대+240.00초/대)/60분 = 12분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×8회/대 = 20.0m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 12분/대(적재), t3 = 12분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 12분/대+68.57분/대+12분/대+0.42분/대+1.50분/대= 94.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 94.49분/대(60분×1.00×0.90)/20.0m/대 = 0.087hr/m 3) 하차비(10ton,크레인) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90.00초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴1일실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일/×0.010hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비:원심력수로관(D500㎜):1.03m 3. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 27본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [공통]6-7-1 플륨관설치

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c-6	원심력사각수로관부설 (D600,760×760×2,500mm)	m	1. 운반(덤프트럭10.5ton 트럭,20㎞이내) 1) 적재:10.5ton/대/1.730ton/본 = 6회/대 - 묶 기:30초/회/×6회/대 = 180초/대 - 회 전:30초/회/×6회/대 = 180초/대 - 풀 기:30초/회/×6회/대 = 180초/대 계:(180.00초/대+180.00초/대+180.00초/대)/60분 = 9분/대 2) 운반비 q1 = 2.50m/본×6회/대 = 15.0m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 9분/대(적재), t3 = 9분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 9분/대+68.57분/대+9분/대+0.42분/대+1.50분/대= 88.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 88.49분/대(60분×1.00×0.90)/15.0m/대 = 0.109hr/m 3) 하차비(10ton,크레인) q0 = 2.50m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90.00초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.50m/본 = 0.01hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴1일실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일/×0.010hr/m = 0.0025인/m 2. 재료비:원심력수로관(D600㎜):1.03m 3. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 20본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2.50m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.50m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [공통]6-7-1 플륨관설치

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
d	U형플륨관부설
d-1	U형플륨관부설 (소켓식, D200, 210×200×2,000mm)	m	1. 운반(덤프트럭10.5ton 트럭,20㎞이내) 1) 적재:10.5ton/대/0.085ton/본 = 124회/대 - 묶 기:30초/회/×124회/대 = 3720초/대 - 회 전:30초/회/×124회/대 = 3720초/대 - 풀 기:30초/회/×124회/대 = 3720초/대 계:(3720.00초/대+3720.00초/대+3720.00초/대)/60분 = 186분/대 2) 운반비 q1 = 2.00m/본×124회/대 = 248.0m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 186분/대(적재), t3 = 186분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 186분/대+68.57분/대+186분/대+0.42분/대+1.50분/대 = 442.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 442.49분/대(60분×1.00×0.90)/248.0m/대 = 0.033hr/m 3) 하차비(10ton,크레인) q0 = 2.00m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90.00초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.00m/본 = 0.013hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴1일실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일/×0.013hr/m = 0.00325인/m 2. 재료비 1) U형플륨관(D200㎜):1.03m 3. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 75본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2.00m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2.00m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.00m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [공통]6-7-1 플륨관설치

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
d-2	U형플륨관부설 (소켓식, D300, 310×275×32×2,000mm)	m	1. 운반(덤프트럭10.5ton 트럭,20㎞이내) 1) 적재:10.5ton/대/0.135ton/본 = 78회/대 - 묶 기:30초/회/×78회/대 = 2340초/대 - 회 전:30초/회/×78회/대 = 2340초/대 - 풀 기:30초/회/×78회/대 = 2340초/대 계:(2340.00초/대+2340.00초/대+2340.00초/대)/60분 = 117분/대 2) 운반비 q1 = 2.00m/본×78회/대 = 156.0m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 117분/대(적재), t3 = 117분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 117분/대+68.57분/대+117분/대+0.42분/대+1.50분/대 = 304.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 304.49분/대(60분×1.00×0.90)/156.0m/대 = 0.036hr/m 3) 하차비(10ton,크레인) q0 = 2.00m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90.00초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.00m/본 = 0.013hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴1일실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일/×0.013hr/m = 0.00325인/m 2. 재료비 1) U형플륨관(D300㎜):1.03m 3. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 75본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2.00m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2.00m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.00m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [공통]6-7-1 플륨관설치

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
d-3	U형플륨관부설 (소켓식, D400, 425×350×38×2,000mm)	m	1. 운반(덤프트럭10.5ton 트럭,20㎞이내) 1) 적재:10.5ton/대/0.200ton/본 = 53회/대 - 묶 기:30초/회/×53회/대 = 1590초/대 - 회 전:30초/회/×53회/대 = 1590초/대 - 풀 기:30초/회/×53회/대 = 1590초/대 계:(1590.00초/대+1590.00초/대+1590.00초/대)/60분 = 80분/대 2) 운반비 q1 = 2.00m/본×53회/대 = 106.0m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 80분/대(적재), t3 = 80분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 80분/대+68.57분/대+80분/대+0.42분/대+1.50분/대 = 230.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 230.49분/대(60분×1.00×0.90)/106.0m/대 = 0.040hr/m 3) 하차비(10ton,크레인) q0 = 2.00m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90.00초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.00m/본 = 0.013hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴1일실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일/×0.013hr/m = 0.00325인/m 2. 재료비 1) U형플륨관(D400㎜):1.03m 3. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 63본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2.00m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2.00m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.00m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [공통]6-7-1 플륨관설치

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
d-4	U형플륨관부설 (소켓식, D450, 480×390×45×2,000mm)	m	1. 운반(덤프트럭10.5ton 트럭,20㎞이내) 1) 적재:10.5ton/대/0.270ton/본 = 39회/대 - 묶 기:30초/회/×39회/대 = 1170초/대 - 회 전:30초/회/×39회/대 = 1170초/대 - 풀 기:30초/회/×39회/대 = 1170초/대 계:(1170.00초/대+1170.00초/대+1170.00초/대)/60분 = 59분/대 2) 운반비 q1 = 2.00m/본×39회/대 = 78m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 59분/대(적재), t3 = 59분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 59분/대+68.57분/대+59분/대+0.42분/대+1.50분/대 = 188.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 188.49분/대(60분×1.00×0.90)/78.0m/대 = 0.045hr/m 3) 하차비(10ton,크레인) q0 = 2.00m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90.00초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.00m/본 = 0.013hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴1일실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일/×0.013hr/m = 0.00325인/m 2. 재료비 1) U형플륨관(D450㎜):1.03m 3. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 63본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2.00m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2.00m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.00m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [공통]6-7-1 플륨관설치

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
d-5	U형플륨관부설 (소켓식, D500, 530×425×52×2,000mm)	m	1. 운반(덤프트럭10.5ton 트럭,20㎞이내) 1) 적재:10.5ton/대/0.330ton/본 = 32회/대 - 묶 기:30초/회/×32회/대 = 960초/대 - 회 전:30초/회/×32회/대 = 960초/대 - 풀 기:30초/회/×32회/대 = 960초/대 계:(960.00초/대+960.00초/대+960.00초/대)/60분 = 48분/대 2) 운반비 q1 = 2.00m/본×32회/대 = 64.0m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 48분/대(적재), t3 = 48분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 48분/대+68.57분/대+48분/대+0.42분/대+1.50분/대 = 166.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 166.49분/대(60분×1.00×0.90)/64.0m/대 = 0.048hr/m q0 = 2.00m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90.00초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.00m/본 = 0.013hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴1일실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일/×0.013hr/m = 0.00325인/m 2. 재료비 1) U형플륨관(D500㎜):1.03m 3. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 52본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2.00m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2.00m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.00m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [공통]6-7-1 플륨관설치

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
d-6	U형플륨관부설 (소켓식, D600, 640×500×60×2,000mm)	m	1. 운반(덤프트럭10.5ton 트럭,20㎞이내) 1) 적재:10.5ton/대/0.440ton/본 = 24회/대 - 묶 기:30초/회/×24회/대 = 720초/대 - 회 전:30초/회/×24회/대 = 720초/대 - 풀 기:30초/회/×24회/대 = 720초/대 계:(720.00초/대+720.00초/대+720.00초/대)/60분 = 36분/대 2) 운반비 q1 = 2.00m/본×24회/대 = 48.0m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 36분/대(적재), t3 = 36분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 36분/대+68.57분/대+36분/대+0.42분/대+1.50분/대 = 142.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 142.49분/대(60분×1.00×0.90)/48.0m/대 = 0.055hr/m 3) 하차비(10ton,크레인) q0 = 2.00m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90.00초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.00m/본 = 0.013hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴1일실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일/×0.013hr/m = 0.00325인/m 2. 재료비 1) U형플륨관(D600㎜):1.03m 3. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 52본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2.00m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2.00m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.00m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [공통]6-7-1 플륨관설치

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
d-7	U형플륨관부설 (소켓식, D700, 745×575×70×2,000mm)	m	1. 운반(덤프트럭10.5ton 트럭,20㎞이내) 1) 적재:10.5ton/대/0.480ton/본 = 22회/대 - 묶 기:30초/회/×22회/대 = 660초/대 - 회 전:30초/회/×22회/대 = 660초/대 - 풀 기:30초/회/×22회/대 = 660초/대 계:(660.00초/대+660.00초/대+660.00초/대)/60분 = 33분/대 2) 운반비 q1 = 2.00m/본×22회/대 = 44.0m/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 33분/대(적재), t3 = 33분/대(적하), t4 = 0.42분/대, t6 = 1.50분/대 t2 = (20㎞/35㎞/hr(적재)+20㎞/35㎞/hr(공차))×60분 = 68.57분/대 Cm = 33분/대+68.57분/대+33분/대+0.42분/대+1.50분/대 = 136.49분/대 OH : 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 Q = 136.49분/대(60분×1.00×0.90)/44.0m/대 = 0.057hr/m 3) 하차비(10ton,크레인) q0 = 2.00m/본, f = 1.00, E = 1.00 t1 = 30초/본(묶기), t2 = 30초/본(회전), t3 = 30초/본(풀기) Cm = 30초/본+30초/본+30초/본 = 90초/본 Q = 90.00초/본/(3600초×1.00×1.00)/2.00m/본 = 0.013hr/m 4) 인건비(트럭위 1인+트럭아래 1인) ∴1일실작업시간:480분/일/60분/hr = 8.0hr/일 보통인부:2인/일/8.0hr/일/×0.013hr/m = 0.00325인/m 2. 재료비 1) U형플륨관(D700㎜):1.03m 3. 설치비 ∴ 일당 시공량 Q = 52본/일 1) 특별인부:2인/일 / Q 본/일 / 2.00m/본 2) 보통인부:1인/일 / Q 본/일 / 2.00m/본 3) 굴착기:1대/일 × 8hr/대 / Q 본/일 / 2.00m/본 4) 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등) : 인력품의 8% ※ 굴착기 규격은 작업여건(시공 높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.	[공통]8-2-8 덤프트럭 [공통]6-7-1 플륨관설치

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
e	강관 부설 및 접합 (기계부설)
e-1	강관 부설 및 접합 (D300㎜)	m	“8. 강관부설 8.02 a 강관 부설 및 접합(기계부설)” 참조
e-2	강관 부설 및 접합 (D350㎜)	m	“8. 강관부설 8.02 b 강관 부설 및 접합(기계부설)” 참조
e-3	강관 부설 및 접합 (D400㎜)	m	“8. 강관부설 8.02 c 강관 부설 및 접합(기계부설)” 참조
e-4	강관 부설 및 접합 (D450㎜)	m	“8. 강관부설 8.02 d 강관 부설 및 접합(기계부설)” 참조
e-5	강관 부설 및 접합 (D500㎜)	m	“8. 강관부설 8.02 e 강관 부설 및 접합(기계부설)” 참조
e-6	강관 부설 및 접합 (D600㎜)	m	“8. 강관부설 8.02 f 강관 부설 및 접합(기계부설)” 참조
e-7	강관 부설 및 접합 (D700㎜)	m	“8. 강관부설 8.02 g 강관 부설 및 접합(기계부설)” 참조
e-8	강관 부설 및 접합 (D800㎜)	m	“8. 강관부설 8.02 h 강관 부설 및 접합(기계부설)” 참조
e-9	강관 부설 및 접합 (D900㎜)	m	“8. 강관부설 8.02 i 강관 부설 및 접합(기계부설)” 참조
e-10	강관 부설 및 접합 (D1,000㎜)	m	“8. 강관부설 8.02 j 강관 부설 및 접합(기계부설)” 참조
e-11	강관 부설 및 접합 (D1,100㎜)	m	“8. 강관부설 8.02 k 강관 부설 및 접합(기계부설)” 참조
e-12	강관 부설 및 접합 (D1,200㎜)	m	“8. 강관부설 8.02 l 강관 부설 및 접합(기계부설)” 참조
e-13	강관 부설 및 접합 (D1,350㎜)	m	“8. 강관부설 8.02 m 강관 부설 및 접합(기계부설)” 참조
e-14	강관 부설 및 접합 (D1,500㎜)	m	“8. 강관부설 8.02 n 강관 부설 및 접합(기계부설)” 참조

RECORD HISTORY

Rev.0('14.12.31) 철도건설공사 수량 및 단가산출 표준의 구성체계를 KR CODE집에 맞추어 항목별 체계로 개정하여 사용자가 손쉽게 이용하는데 목적을 둠.

Rev.1('15.03.31) 2015년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.2('15.12.31) 2015년 하반기 건설공사 표준품셈 개정분을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.3('16.04.30) 2016년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.4('16.12.31) 2016년 하반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.5('17.05.29) 2017년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.6('17.09.12) 2017년 하반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.7('18.03.19) 2018년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.8('19.04.02) 2019년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.9('19.12.24) 2019년 하반기 신규공종단가 및 관련부서 개정 요구사항 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.10('20.06.30) 2020년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.11('21.05.18) 2021년 상반기 표준품셈 개정, 감사처분, 현장VOC 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.12('21.12.29) 공단 명칭, CI변경분 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.13('22.06.03) 2022년 건설공사 표준품셈 개정사항 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.14('23.03.31) 2023년 상반기 건설공사 표준품셈 개정사항 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.15('24.07.15) 2024년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분, 감사처분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.16('26.01.14) 2025년 건설공사 표준품셈 개정분, 감사처분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공