서해선 복선전철 공정률(2021년 7월)

□ 공정현황

분야		공정률(%)
계		78.2
설계		58.5
감리		53.4
용지		95.9
노반	1공구	89.2
	2공구	94.9
	3공구	92.1
	4공구	97.4
	5공구	97.3
	6공구	86.3
	7공구	98.4
	8공구	93.3
	9공구	89.5
	10공구	89.8
	기타	76.4
	소계	91.0
궤도		57.2
건물		40.4
전력		26.4
통신		20.7
신호		18.0
차량기지		44.2
부대		55.9