서해선 복선전철 공정률(2020년 1월)

□ 공정현황

분야		공정률(%)
계		59.1
설계		56.0
감리		32.0
용지		96.1
노반	1공구	76.8
	2공구	81.3
	3공구	82.6
	4공구	78.7
	5공구	76.5
	6공구	59.9
	7공구	83.2
	8공구	82.1
	9공구	65.6
	10공구	77.1
	기타	58.3
	소계	73.6
궤도		0.2
건물		0.0
전력		0.3
통신		0.7
신호		2.9
차량기지		21.2
부대		48.6