Ⅰ. 사업개요

목포

(임성리)

익

산

43.7㎞

오

송

정

읍

광주

송정

● 신설역(1)

● 개량역(5)

■ 차량기지(1)

경부

고속철도

천안아산

대전

서울

공

주

46.0㎞

42.1㎞

50.5㎞

48.6㎞

(230.9㎞)

■

군산선

전라선

경전선

부산

서대전

논산

김제

장성

함평

무안

차량기지

타당성조사완료(‘10.12)

호남선

182.3㎞

❍ 사업내용 : 오송～목포간 230.9㎞ 신선 건설

- 오송～익산(89.7km)～광주송정(182.3km)～목포(230.9km)

- 역사 신설 및 개량 : 6개역 (오송역 호남선부분 포함)

- 광주차량기지 신설

❍ 사업비/사업기간 : 10조 4,901억원 / 2006～2017년

- (오송～광주송정)  8조 5,197억원 / 2006 ～2014년

- (광주송정～목포)  1조 9,704억원 / 2006 ～2017년

- (차량구입비)  7,535억원

＊소요시간 : 용산～목포간 1시간 46분

구 분		용산～오송	오송～광주	광주～목포	비 고
연 장		121.8km	182.3km (304.1km)	48.6km (352.7km)	오송～목포 230.9km
소요 시간	현재	39분	120분 (159분)	26분 (185분)	격역 정차 (오송,익산)
	신선	39분	54분 (93분)	13분 (106분)
	단축	-	△66분(△66분)	△13분(△79분)

(   ) : 용산기점 누계

□ 공정추진

❍ '11.6월말 공정 : 26.7% (계획 25.3% 대비 105.5%)

❍ 월별/분야별 공정실적

- 월 별                                            (단위 : %)

구 분		‘10년까지	‘11. 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	계획	11.5	12.6	13.9	15.5	17.3	18.5	20.2	21.6	23.0	24.8	26.8	28.9	31.0
	실적	11.5	12.6	13.9	15.9	17.6	18.9	21.3	-	-	-	-	-	-
	대비	100.0	100.0	100.0	102.6	101.7	102.2	105.4	-	-	-	-	-	-
오송 ～ 광주송정	계획	13.9	16.5	19.2	20.3	21.6	23.1	25.3	27.0	28.8	31.0	33.5	36.1	39.1
	실적	13.9	16.5	19.3	20.6	22.0	23.7	26.7	-	-	-	-	-	-
	대비	100.0	100.0	100.8	101.5	102.0	102.4	105.5	-	-	-	-	-	-
광주송정～ 목포	계획	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	실적	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	대비	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 분야별(오송~광주송정)

구 분		‘10년 까지	‘11년 계획	‘11년				누계
				당월	금년누계
					계획	실적	대비	계획	실적	대비
계		13.9	39.1	2.2	11.4	12.8	112.3	25.3	26.7	105.5
설 계		62.3	71.3	2.5	6.6	6.6	100.0	68.9	68.9	100.0
감 리		8.2	18.6	0.8	4.8	4.8	100.0	13.0	13.0	100.0
용 지		66.5	80.4	1.4	8.7	11.3	129.9	75.2	77.8	103.5
공사	계	12.5	35.3	2.3	7.6	9.0	118.4	20.1	21.5	107.0
	노 반	18.6	51.9	3.2	11.1	13.8	124.3	29.7	32.4	109.1
	궤 도	2.4	6.0	2.3	2.3	2.2	95.7	4.7	4.6	97.9
	건 물	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	전 력	0.9	3.3	0.2	0.5	0.2	40.0	1.4	1.1	78.6
	통 신	2.6	3.6	0.1	0.4	0.4	100.0	3.0	3.0	100.0
	신 호	0.4	2.7	0.3	1.0	0.8	80.0	1.4	1.2	85.7
	차량기지	11.7		1.2	-	1.2	-	-	1.2	-
차 량 구 입		-		-	-	-	-	-	-	-