Ⅰ. 사업개요

1. 개요

목포

(임성리)

익

산

43.7㎞

오

송

정

읍

광주

송정

● 신설역(1)

● 개량역(5)

■ 차량기지(1)

경부

고속철도

천안아산

대전

서울

공

주

46.0㎞

42.1㎞

50.5㎞

48.6㎞

(230.9㎞)

■

군산선

전라선

경전선

부산

서대전

논산

김제

장성

함평

무안

차량기지

타당성조사중

호남선

182.3㎞

ㅇ 사업구간 : 오송~목포간 230.9㎞

ㅇ 사업기간 : 2006~2017년

오송~광주송정 2014년, 광주송정~목포 2017년까지 완공

ㅇ 사업비 : 기본계획('09.4.16) 11조 3,382억원/총사업비('10.7.29) 10조 4,901억원

ㅇ 효과 :  철도수송능력 향상과 빠른 교통체계 구축으로 반나절생활권 실현, 충청․호남지역의 균형발전 촉진

2. 투자계획

(단위 : 백만원)

총소요	기투자 (‘06~’08년)	2009년	2010년	2011년	12년이후
10,490,075	150,750	292,000	945,043	1,648,265	7,454,017
국고 : 5,245,037 자체 : 5,245,038	150,750 0	140,000 152,000	310,000 635,043	799,700 848,565	3,844,587 3,609,430
	기본설계 완료 노반 실시설계착수	노반실시설계완료 용지매수 노반공사착수	실시설계 (건축, 전기) 노반공사(계속)	노반공사(계속)	준 공

3. 추진경위

ㅇ ‘06. 8.28 : 호남고속철도 건설기본계획 확정․고시(건교부 2006-336호)

ㅇ ‘06.11.30 ~ ’08.11.28 : 호남고속철도 기본설계 시행

ㅇ ‘07. 2.15 ~ ’09. 2.3 : 청원 ~ 공주 구간 환경영향평가 시행

ㅇ ‘07. 7.20 ~ ’09. 7.8 : 오송 ~ 광주송정 구간 교통영향평가 시행

ㅇ ‘07. 7.24 ~ ’09. 7.12 : 논산~김제, 정읍~광주송정 구간 환경영향평가 시행

ㅇ ‘07.12. 7 ~ ’08. 9.30 : 무안공항 타당성조사 시행

ㅇ ‘07.12.10 ~ ’08. 6.6 : 충청권, 호남권 문화재 지표조사 시행

ㅇ ‘08. 4. 1 ~ ’08.11.26 : 오송 ~ 광주송정 구간 사전재해영향성 검토 시행

ㅇ ‘08. 9.26 ~ ’09.10.30 : 광주차량기지 기술조사 용역 시행

ㅇ '08.11.28~'09. 7 : 1~7공구 계약 및 실시설계 착수

ㅇ '08.12. 5~'09. 7 : 8공구 계약 및 실시설계 착수

ㅇ '09. 1.30 : 환경영향평가(청원~공주, 논산~김제, 정읍~광주송정) 협의완료(환경부)

ㅇ '09. 3.10 : 오송~광주송정 구간 교통영향분석ㆍ개선대책수립 협의완료

ㅇ '09. 4.16 : 호남고속철도 사업실시계획 및 기본계획변경 승인 고시

ㅇ '09. 4.28 : 편입 용지 협의매수 통보

ㅇ '09. 5. 8 : 오송~광주송정 구간 대형공사 입찰방법 심의(대안입찰)

ㅇ '09. 5.22 : 턴키공사 1-1, 3-2 공구 착공

ㅇ '09. 6.30 : 노반 3-1, 3-2공구 전면책임감리용역 계약(동명기술공단)

ㅇ '09. 8.20 : 호남고속철도 광주송정~목포(임성리)구간 노선선정 타당성조사 착수

ㅇ '09. 9.30 : 노반공사 5개 공구 공사착수(기타공사 1차분)

ㅇ '09.11.20 : 송변전설비 3개 공구 실시설계 착수

ㅇ '09.11.24 : 노반공사 8개 공구 공사착수(기타공사 2차분)

ㅇ '09.12.28 : 노반공사 4개 공구 공사착수(대안)

ㅇ '10. 2. 9 : 전차선로(오송~익산, 익산~광주) 실시설계 착수

ㅇ '10. 5. 6 : 광주차량기지(T/K) 실시설계적격자선정(대림산업 컨소시엄)

ㅇ '10. 5.10 : 궤도공사(1,2공구) 실시설계 착수

ㅇ '10. 6.22 : 통신선로, 역무용통신설비, 열차무선시스템 실시설계 착수

ㅇ '10. 6.23 : 전력설비 2개 공구 실시설계 착수

ㅇ '10. 7. 9 : 신호설비 2개 공구 실시설계 착수

ㅇ '10. 9. 7 : 통신유도대책 2개 공구 실시설계 착수

Ⅱ. 공정 현황

1. 공정 추진 실적(오송~광주송정)

구 분		‘09년 까지	‘10년				누계			비고
			당월	금년누계
				계획	실적	대비	계획	실적	대비
계		2.5	1.30	9.40	9.67	102.9	11.90	12.17	102.3
설 계		57.69	0.37	5.31	3.83	72.1	63.00	61.53	97.7
감 리		0.77	0.75	6.56	6.14	93.6	7.33	6.92	94.4
용 지		32.58	5.53	33.92	31.34	92.4	66.50	63.92	96.1
공사	계	1.16	1.34	7.13	7.95	111.5	8.29	9.11	109.9
	노 반	1.62	1.67	8.99	10.14	112.8	10.61	11.76	110.8
	궤 도	-	0.00	1.23	1.81	147.2	1.23	1.81	147.2
	건 물	-	-	-	-	-	-	-	-
	전 력	-	0.37	0.79	0.36	45.6	0.79	0.36	45.6
	통 신	-	0.79	2.49	2.26	90.8	2.48	2.26	91.1
	신 호	-	0.10	0.21	0.63	300.0	0.21	0.63	300.0
	차량기지	-	-	-	-	-	-	-	-
차 량 구 입		-	-	-	-	-	-	-	-