붙 임		2021년 궤도분야 지급자재 구매·관리 관련 사전공지(안)

2021년 궤도분야 지급자재 구매 관련 사전공지

2020. 1.

◈ 코로나19 감염병 확산방지를 위한 방역조치에 따라 「공개설명회」를 홈페이지와 전자조달시스템을 통하여 「사전공지」로 대신함을 양해부탁드립니다.

□ 목  적

ㅇ 2021년 궤도공사용 지급자재에 대한 구매발주 계획 및 입찰정보 등을 사전공지하여, 투명하고 공정한 입찰 환경조성 및 신규 업체 참여기회 제공

□ 구매 발주계획

ㅇ 동해선(포항~동해) 전철화사업 등 5개 사업, 레일 등 지급자재 6종, 20건(279억원) 발주

< 2021년 구매 발주계획 >

물품명	사 업 명	단위	수량	규격 (규격별수량)	설계금액 (백만원)	비고
계					27,860
레일	동해선(포항~동해) 전철화사업	개	178	50N(144), KR60(34)	321	2월
	호남고속철도 고막원, 임성리정거장 단계별 시공 궤도공사	개	496	KR60(150), 60E1(346)	1,113	3월
	포승~평택 철도건설(궤도2공구)	개	898	50N(15), KR60(101), 60E1(782)	1,951	7월
	문경~이천 철도건설 문경~충주	개	1,676	50N(215), 60E1(1,461)	3,584	7월
	대전차량기술단 인입철도 이설 궤도공사	개	270	50N(95), KR60(175)	630	8월
60kg 분기기	동해선(포항~동해) 전철화사업	틀	6	60kgK #12 가동(2), 60kgK #15 가동(4)	1,660	2월
	호남고속철도 고막원, 임성리정거장 단계별 시공 궤도공사	틀	13	60kgK #10 고정(2), 60kgK #10 가동(2), 60E1 #10 가동(5), 60E1 #26 가동(4),	6,261	3월
	포승~평택 철도건설(궤도2공구)	틀	11	60kgK #8 고정(1), 60kgK #15 고정(1), 60kgK #15 가동(2), 60E1 #8 고정(5), 60E1 #15 고정(2)	1,741	7월
	문경~이천 철도건설 문경~충주	틀	12	60E1 #8 고정(3), 60E1 #12 고정(1), 60E1 #12 가동(1), 60E1 #15 고정(5), 60E1 #15 가동(2)	2,033	7월

물품명	사 업 명	단위	수량	규격 (규격별수량)	설계금액 (백만원)	비고
60kg 분기기	대전차량기술단 인입철도 이설 궤도공사	틀	16	60kgK #10 고정(14), 60kgK #12 고정(1), 60kgK #15 고정(1)	2,312	8월
50kg 분기기	문경~이천 철도건설 문경~충주	틀	7	50kg #8 고정(7)	438	7월
	대전차량기술단 인입철도 이설 궤도공사	틀	8	50kg #8 고정(6) 50kg #10 고정(2)	600	8월
Bi-Block침목	문경~이천 철도건설 문경~충주	개	14,081	60E1, KR체결장치용 (14,081)	1,313	7월
	대전차량기술단 인입철도 이설 궤도공사	개	1,696	KR60, KR체결장치용 (1,696)	157	8월
KR형 레일체결장치	문경~이천 철도건설 문경~충주	조	40,162	60E1레일용(40,162)	1,847	7월
	대전차량기술단 인입철도 이설 궤도공사	조	3,360	KR60레일용(3,360)	161	8월
e-클립형 레일체결장치	호남고속철도 고막원, 임성리정거장 단계별 시공 궤도공사	조	19,028	50N레일용(22), KR60레일용(3,450), 60E1레일용(15,556)	182	3월
	포승~평택 철도건설(궤도2공구)	조	37,404	50N레일용(538), KR60레일용(4,266), 60E1레일용(32,600)	361	7월
	문경~이천 철도건설 문경~충주	조	25,664	50N레일용(8,116), 60E1레일용(17,548)	242	7월
PST패널	문경~이천 철도건설 문경~충주	조	750	PST-C형 토공용(20) PST-C형 터널용(730)	953	7월

*  수량 및 설계금액은 배선변경 등에 따라 일부 변경될 수 있음.

□ 계약시행 방안

ㅇ 입찰방법

1) 국제입찰 및 국내입찰 구분

	< 기본원칙 >
「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등의 기획재정부장관이 정하는 고시금액」에 따라 6억 5천만원 이상의 물품의 경우 국제입찰 원칙

ㅇ 설계금액이 6억 5천만원 이상인 구매계약은 국제입찰 적용, 미만인 구매계약은 국내입찰 적용

2) 일반경쟁 및 제한경쟁 구분

	< 기본원칙 >
-「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제7조와 같은 법 시행령 제21조에 따라 일반경쟁 원칙이며, 특수한 설비 또는 기술이 요구되는 물품제조계약의 경우 설비 및 기술 보유상황 또는 실적 제한 가능 -「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」제2조의2에 따라 추정가격이 2억원 미만의 물품인 경우 중소기업자 간 제한경쟁입찰 원칙

- 특수한 설비 또는 기술이 요구되는 분기기, KR형 레일체결장치, 사전제작형 철근콘크리트궤도(PST)패널은 기술 보유상황 또는 실적을 제한하는 제한경쟁입찰 적용, 이 외 품목은 일반경쟁입찰 적용

- 추정가격 2억원 미만의 물품은 중소기업자간 제한경쟁입찰 적용

ㅇ 물품구매 낙찰적격심사 운영

1) 납품실적 평가

	< 기본원칙 >
- 공단「물품구매 낙찰적격심사기준」에 따라 추정가격이 “10억원 이상”일 경우 납품실적 평가를 시행하며, 배점한도는 5점임. - 같은 기준 제12조에 따라 물품의 특성에 따라 이 지침을 적용하기 곤란하다고 인정되는 사항에 대하여는 입찰설명서 등에 반영하여 집행할 수 있음.

- 공급시장이 안정화된 궤도 지급자재는「물품구매 낙찰적격심사기준」에 따라 납품실적 평가를 시행하되, 국내의 납품실적 보유업체가 1∼2개社로 독과점 시장구조인 물품은 모든 입찰참여 업체 납품실적을 배점만점(5점) 적용

* 현행 : KR형 레일체결장치, e클립형 레일체결장치, PST패널

- (2022년 시행계획) 레일체결장치(KR형, e클립형)는 「물품구매 낙찰적격심사기준」에 따라 납품실적 평가를 시행하고, 분기기, PST패널은 모든 입찰참여 업체에 대하여 납품실적을 배점만점(5점) 적용

* 신규업체 진입장벽 완화를 위한 사항으로 업체의 혼란방지를 위해 1년간 사전공지 후 시행

· 레일체결장치(KR형, e클립형)의 납품실적 평가 시, 도상별 체결장치 종류에 상관없이 모든 체결장치 납품실적(조단위)을「계약목적물과 동등이상 물품」으로 평가 (계약목적물과 유사물품 없음)

2) KR형 레일체결장치의 국산화율 평가(폐지)

- KR형 레일체결장치는 개발취지*에 따라 예외적으로 낙찰적격심사 시 「국산화율 평가」를 시행하고 있음.(2017~2020년)

* 수입의존도가 높은 철도 주요자재를 국산화 개발하여 사용자환경에 적합한 원천기술을 보유하고, 안정적 공급역량 확보 및 내수경제 활성화 기여

- 정부조달협정에 따라 6억5천만원 이상 물품의 경우 국제입찰 대상으로 「국산화율 평가」가 협정가입국에 대한 차별이 될 수 있으므로 금년도 발주 분부터 KR형 레일체결장치의 「국산화율 평가」제도를 폐지하고, 공단「물품구매 낙찰적격심사기준」따라 기술능력 평가 시행

ㅇ 공동계약에 관한 사항

	< 기본원칙 >
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제25조 및 같은 법 시행령 제72조에 따라 공동계약 원칙이나, 경쟁이 성립되지 않을 경우 불허(감사원 지적) - 「공동계약 운용요령(기획재정부 계약예규)」제9조(공동수급체의 구성)에 따라 해당 품목의 입찰참가자격을 갖춘 업체가 5개사 미만인 경우 담합 발생 소지가 있어 공동계약 불허

- 입찰참가자격을 갖춘 업체가 5개社 미만인 레일, 분기기, KR형 레일체결장치, e-클립형 레일체결장치는 공동계약 불허

- 입찰참가자격을 갖춘 업체가 5개社 이상인 Bi-block침목, PST패널은 공동계약 허용

ㅇ 분할납품 일정

- (본사 발주 시) 최초 납품은 제조 준비기간(생산시스템 및 설비구축 등)을 감안하여 발주 후 약 4~5개월 후부터 시행, n차 납품은 반기 또는 분기별로 관리기준공정표(IPS) 일정에 맞춰 수립

* 원활한 생산을 위해 KR형 체결장치는 침목, PST패널 납품일정보다 한 달 전 납품

- (지역본부 계약관리 시) 품질조정회의 등에서 공사 추진 여건, 사업비 집행, 예산배정 등을 고려하여 공정에 지장을 주지 않는 범위에서 상호 협의 조정

□ 품목별 계약방법

1. 레 일

ㅇ 계약형태 : 총액계약

ㅇ 업체선정 방식

- 입찰방법 : 일반경쟁(국제입찰)  * 6억5천만원 미만인 경우 국내입찰

- 입찰참가자격

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 철도용 레일(세부품명번호 10자리 2524011501)을 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 업체

② WTO 정부조달협정 회원국의 국민으로서 동 회원국에서 생산, 제조(제품에 실질적 변형을 가져오는 공정)된 물품을 공급하는 자로 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가 등록한 자

※ (입찰공고문 및 추가특수조건 반영) 계약상대자는 「철도안전법」제27조(철도용품 형식승인) 및 제27조의2(철도용품 제작자승인)에 따라 국토교통부장관으로부터 철도용품(레일)의 형식승인 및 제작자승인을 받아야 함.

- 공동계약에 관한 사항 : 허용하지 아니함

- 낙찰적격심사 평가 세부기준

․납품실적 평가요소 : 금액 적용

․동등이상 물품 : 50kg레일, 60kg레일

․유사물품 : 없음

2. 분기기

ㅇ 계약형태 : 총액계약

ㅇ 업체선정 방식

- 입찰방법 : 제한경쟁(국제입찰)   * 6억5천만원 미만인 경우 국내입찰

- 입찰참가자격

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 철도용분기기(세부품명번호 10자리 2524020801)을 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 업체

② WTO 정부조달협정 회원국의 국민으로서 동 회원국에서 생산, 제조(제품에 실질적 변형을 가져오는 공정)된 물품을 공급하는 자로 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가 등록한 자

③ (50kg 분기기 발주의 경우) 50kg 분기기를 제조하여 납품한 실적이 있는 업체 또는 공단의「철도시설성능검증지침」에 따라 50kg 분기기에 대한 철도시설성능검증서를 교부받은 업체

③ (60kg 분기기 발주의 경우) 60kg 분기기를 제조하여 납품한 실적이 있는 업체 또는 공단의「철도시설성능검증지침」에 따라 60kg 분기기에 대한 철도시설성능검증서를 교부받은 업체

- 공동계약에 관한 사항 : 허용하지 아니함

- 낙찰적격심사 평가 세부기준

(2021년 발주분 적용)

구 분	50kg 분기기	60kg 분기기
납품실적 평가요소	금액 적용	금액 적용
계약목적물과 동등이상 물품	50kg, 60kg 레일용 분기기	60kg 레일용 분기기
계약목적물과 유사물품	없음	50kg 레일용 분기기

(2022년 발주분부터 적용)

ㆍ납품실적 평가요소 : 모든 유효한 입찰자 만점(5점) 적용

3. Bi-block 침목

ㅇ 계약형태 : 총액계약

ㅇ 업체선정 방식

- 입찰방법 : 일반경쟁(국제입찰)  * 6억5천만원 미만인 경우 국내입찰

- 입찰참가자격

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 철로용 콘크리트침목(세부품명번호 10자리 2524050102)을 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 업체

② WTO 정부조달협정 회원국의 국민으로서 동 회원국에서 생산, 제조(제품에 실질적 변형을 가져오는 공정)된 물품을 공급하는 자로 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가 등록한 자

- 공동계약에 관한 사항 : 허용

- 낙찰적격심사 평가 세부기준

․납품실적 평가요소 : 금액 적용

․동등이상 물품 : 철도 콘크리트침목 제품

․유사물품 : PC(프리캐스트) 콘크리트 제품

4. KR형 레일체결장치

ㅇ 계약형태 : 총액계약

ㅇ 업체선정 방식

- 입찰방법 : 제한경쟁(국제입찰)  * 6억5천만원 미만인 경우 국내입찰

- 입찰참가자격

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 철도용 콘크리트침목체결구(세부품명번호 10자리 2524043401)를 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 업체

② WTO 정부조달협정 회원국의 국민으로서 동 회원국에서 생산, 제조(제품에 실질적 변형을 가져오는 공정)된 물품을 공급하는 자로 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가 등록한 자

③ KR형 레일체결장치를 제조하여 납품한 실적이 있는 업체 또는 한국철도표준규격(KRS TR 0014) 및 한국철도시설공단 잠정표준규격(KRSA-T-2015-1005)에 따라 공인시험기관 품질시험(구성품 관리시험, 조합체 성능시험)에 합격한 업체

* 공인시험기관(국가표준기본법 제23조에 의한 한국인정기구로부터 인정을 획득한 시험기관) 시험성적서는 입찰공고일 기준 5년 이내에 발행한 시험성적서만 인정함.

※ (입찰공고문 및 추가특수조건 반영) 본 물품은 공단과 철도연이 공동으로 국산 개발하여, 실시권을 개방한 물품으로 계약상대자는 공단 「지식재산관리규정」 제28조(실시허여 등의 원칙)에 따라 특허권리 보유자(공단, 철도연)와 기술 실시권 계약을 체결하여야 함.

- 공동계약에 관한 사항 : 허용하지 아니함

- 낙찰적격심사 평가 세부기준

* 낙찰적격심사 시 국산화율 평가제도 폐지, 공단「물품구매 낙찰적격심사기준」따라 기술능력 평가 시행

(2021년 발주분 적용)

․납품실적 평가요소 : 모든 유효한 입찰자 만점(5점) 적용

(2022년 발주분부터 적용)

․납품실적 평가요소 : 금액 적용

ㆍ동등이상 물품 : 모든 종류의 레일체결장치

ㆍ유사물품 : 없음

5. e-클립형 레일체결장치

ㅇ 계약형태 : 총액계약

ㅇ 업체선정 방식

- 입찰방법 : 일반경쟁(국제입찰)  * 6억5천만원 미만인 경우 국내입찰

- 입찰참가자격 : 아래 자격을 갖춘 자이어야 한다

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 철도용코일스프링클립(세부품명번호 10자리 2524043801)을 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 업체

② WTO 정부조달협정 회원국의 국민으로서 동 회원국에서 생산, 제조(제품에 실질적 변형을 가져오는 공정)된 물품을 공급하는 자로 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가 등록한 자

- 공동계약에 관한 사항 : 허용하지 아니함

- 낙찰적격심사 평가 세부기준

․납품실적 평가요소 : 모든 유효한 입찰자 만점(5점)

(2021년 발주분 납품실적 배점만점 적용, 2022년부터 납품실적 평가 시행)

6. 사전제작형 철근콘크리트궤도(PST-C형) 패널

ㅇ 계약형태 : 총액계약

ㅇ 업체선정 방식

- 입찰방법 : 제한경쟁(국제입찰)  * 6억5천만원 미만인 경우 국내입찰

- 입찰참가자격 : 아래의 자격요건을 모두 충족하여야 합니다.

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 철로용 콘크리트침목(세부품명번호 10자리 2524050102)를 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 업체

② WTO 정부조달협정 회원국의 국민으로서 동 회원국에서 생산, 제조(제품에 실질적 변형을 가져오는 공정)된 물품을 공급하는 자로 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가 등록한 자

③ 특허권리 보유자(공단, 철도연, 삼표)와 사전제작형 콘크리트궤도(PST-C형) 기술실시에 관한 협약을 체결한 업체

- 공동계약에 관한 사항 : 허용

- 낙찰적격심사 평가 세부기준

․납품실적 평가요소 : 모든 유효한 입찰자 만점(5점)

□ 품질관리 이행사항

1. ITP(검사 및 시험계획서), ITC(검사 및 시험점검표) 운용

ㅇ 지급자재 품목별 ITP, ITC 운용으로 제작관리 및 검사업무 체계화

<참고> ITP, ITC 운용절차

지급자재 계약	▶	제조사 ITP/ ITC 작성	▶	건설사업관리기술자의 승인 (품질관리계획서에 포함)	▶	제작 착수, ITP/ITC 운용

* 「궤도분야 지급자재 구매관리 프로세스(P-구매관리-07)」에 표준안 참조(홈페이지 정보마당-공개자료실)

ㅇ ITP, ITC 작성 및 운용

1) 총 괄

- 공단 업무 프로세스 「궤도분야 지급자재 구매관리(P-구매관리-07)」별첨에서 해당 지급자재의 ITP, ITC 표준안 참고

- 제조사의 작업환경, 공정 특성, 품질중요도 등을 반영하여 ITP, ITC 표준안을 수정 운영  * 실제 가능한 부분을 표준규격 범위 내에서 자유롭게 변경 작성

- 건설사업관리기술자가 ITP, ITC 직접 운용, 제조사는 외관 및 치수 검사표 등 별첨 자료를 관리대장에 기록관리

* 건설사업관리기술자 검사 시 제조사는 ITC의 적부판정기준의 서류들을 제시할 수 있어야 함.

2) 제조사

<작성 시>

- 해당물품의 표준규격 및 현 실정(작업환경, 공정특성, 품질중요도 등)을 반영하여 표준안을 수정 사용

- ITC의 “적용문서(적부판정기준)”에 체크리스트를 확인할 수 있고 제시가능한 서류로 작성

- ITC의 별첨으로 외관 및 치수검사표의 측정위치, 측정기구를 반영

* 측정이 곤란한 치수는 한계게이지(GONO게이지)를 승인받아 활용하는 방향으로 검토

* 치수의 측정위치는 실제 측정이 가능한 곳으로 선정(자체검사표에 측정위치 표기)

- 협력사 제품을 사용할 경우 반입시 확인문서 및 검사방법(서류 및 샘플링) 반영

<운용 시>

- ITC의 별첨으로 삽입되는 외관 및 치수검사표를 대장으로 관리

* 건설사업관리기술자가 검사 시 ITC의 “적용문서(적부판정기준)”를 제시할 수 있어야 함.

3) 건설사업관리기술자

<작성 시>

- ITP 작성 시 품질중요도, 입회가능 여부 등을 고려하여 검사점을 직접 선정

* 실질적인 Hold Point(H로 표기, 필수확인점)와 Witness Point(W로 표기, 입회점)가 될 수 있도록 반영

- ITC 상 “적용문서(적부판정기준)”에 검사자가 실제 확인 가능한 서류, 검사방법의 포함여부 확인

- ITC의 별첨으로 외관 및 치수검사표의 측정위치, 측정기구를 반영여부 확인

<운용 시>

- 제조사에서 제시한 ITC의 적부판정기준 서류를 직접 확인하여 검사결과에 체크, 검사 결과 보관

2. 레일체결장치(KR형, e-클립형) 양산제품 품질시험

ㅇ KR형 레일체결장치

<입찰 시>

- 납품실적이 없는 신규업체는 시제품에 대한 공인기관 시험성적서(조합체 성능시험, 구성품 관리시험) 제출

* 입찰공고일 기준 5년 이내에 발행한 시험성적서만 인정

<계약체결 후>

- 납품실적이 없는 신규업체 또는 입찰공고일 기준 5년 이내의 납품실적이 없는 업체는 계약체결 후 양산제품에 대한 조합체 성능시험 및 구성품 관리시험을 공인기관에서 실시하고, 시험성적서를 감독자에게 제출 후 납품 개시

* 시험에 소요되는 제반비용은 업체에서 부담

ㅇ e클립형 레일체결장치

<계약체결 후>

- 납품실적이 없는 신규업체 또는 입찰공고일 기준 5년 이내의 납품실적이 없는 업체는 계약체결 후 양산제품에 대한 조합체 성능시험 및 구성품 관리시험을 공인기관에서 실시하고, 시험성적서를 감독자에게 제출 후 납품 개시   * 시험에 소요되는 제반비용은 업체에서 부담

3. KR형 레일체결장치 생산공장 점검

ㅇ 국내 실용화제품인 KR형 레일체결장치의 Risk관리를 위하여 신규참여 업체(기존업체는 필요시 시행)에 대한 생산단계 전반을 점검

ㅇ 점검시기 : 양산제품 생산단계에서 시행

ㅇ 점검내용

- 사내 품질시스템 절차 등 품질관리 이행 실태

- 검사 및 시험계획서(ITP), 검사 및 시험점검표(ITC) 운용 상태

- 생산 및 시험 설비 구축 및 운용 상태, 제품 생산능력 및 공급 계획 등

4. PC제품(침목, PST패널) 생산설비 점검

ㅇ PC제품(침목, PST패널) 품질확보 및 원활한 수급을 위하여 신규참여업체에 대한 생산설비 및 시험장비 구축상태 점검

(공단 표준규격서) 제품 제조설비 중 품질에 영향을 끼치는 공정은 자동화하여 소정의 정밀도로 제작하여야 한다.

ㅇ 점검시기 : 계약체결 후 양산제품 생산착수 전

ㅇ 점검내용

- 콘크리트 침목 생산에 필요한 기본적인 생산공장 시설(제작시설, 시험실, 재료저장소, 보일러실 등)

- 제작설비 자동화 구축여부(콘크리트 타설장비, 진동장비, 양생시설, 탈형시설 등)

- 검사 및 시험계획서(ITP), 검사 및 시험점검표(ITC) 운용 상태

- 품질 인증서 보유 현황, 품질보증계획서 등 사내 품질시스템

- 제품 생산능력 및 공급계획

5. 제작도면 작성 책임

ㅇ 계약상대자는 생산 전에 표준규격 및 자재구매시방서의 불분명 사항, 오류, 누락, 상호 모순 등을 면밀히 검토하여 제작도면을 작성하고, 제작도면 상의 내용으로 인하여 품질에 문제가 발생치 않도록 조치

* 품질조정회의 등에서 건설사업관리단과 협의하여 추진

	<공단 실용화 개발자재의 품질강화를 위한 기술토론회(`20.10.27.) 결과>
「제작도면 승인 절차 삭제」안건에 대한 검토결과 : 수용불가 - 표준규격의 부도에 모든 내용을 포함할 수 없고, 중요치수 외 일부 내용이 제조사별 차이가 있을 수 있기 때문에 제작도면 승인과정을 통하여 구체화 필요

□ 기타 공지사항

ㅇ 입찰참가자격의 별도 제출서류는 입찰참가자격서류 제출기한까지 제출하여야 하며, 제출기한 이후에 제출된 서류는 어떠한 사유로도 인정하지 않습니다.

ㅇ 입찰참가 자격을 받기 위한 설비투자, 시제품 제작, 품질시험 등의 판단은 입찰참가 희망업체의 자유의사에 의해 결정한 것이므로, 이에 따른 소요비용 등에 대하여 공단은 어떠한 법적, 행정적 책임과 의무를 지지 않습니다.

ㅇ 공단 사업계획에 따라 구매시기, 구매수량, 업체선정 방식 등이 변경될 수 있으며, 입찰참가 희망업체는 이에 대한 이의를 제기할 수 없습니다.

ㅇ 계약상대자는 적기에 납품 하여야 하며, 만일 품질미달, 생산지연 등으로 수급에 차질이 발생할 경우 계약서 및 관련법에 따라 공단은 계약변경 또는 계약해지를 할 수 있으며, 이에 대한 모든 책임과 의무는 낙찰업체에게 있습니다.

ㅇ 계약상대자는 계약물품에 대하여 생산 및 납품과정에서 규격서, 도면, 시공성, 유지관리성, 성능 등 개선이 필요하다고 판단될 경우 감독자에게 통보하여 필요한 조치를 하여야 합니다. 특히 KR형 레일체결장치는 실용화 초기 단계이기 때문에 「기술 실시권 계약서 13조(실시제품 사후 관리)」에 의거 정보교환, 피드백 등 실용화 사후관리에 적극 협조하여 하여야 합니다.

ㅇ 계약상대자는 생산 전에 표준규격 및 자재구매시방서의 불분명 사항, 오류, 누락, 상호 모순 등을 면밀히 검토하여 제작도면을 작성하고, 제작도면 상의 내용으로 인하여 품질에 문제가 발생치 않도록 조치하여야 합니다.

위 내용과 관련하여 추가 질의 및 건의사항이 있으시면 담당자(신아영 과장)에게 전화(042-607-4807) 또는 전자우편(say@kr.or.kr)으로 연락하시기 바랍니다.