호남고속철도 광주송정∼목포구간 추진계획(안)

□ 사업개요

ㅇ 신선연장 : 43.9km

* 총 연장  : 77.6km(기존선 고속화 26.4km + 신선 43.9km + 기존선 이용 7.3km)

* 설계속도 : 신선 350km/h, 기존선 고속화 230km/h

ㅇ 사업기간 : 2014∼2020년(설계2년, 공사 5년)

ㅇ 총사업비 : 2조 4,731억원(신선 22,951억원, 기존선 고속화 1,780억원)

6공구

7공구

8공구

기본설계

□ 신선구간 설계발주(43.9km)

ㅇ 기본설계 : 3개 공구

구 분	6공구(18.0km)	7공구(11.77km)	8공구(14.13km)
추정설계비	79억원	61억원	62억원

* 6공구(기존선 고속화 운행제한요인 등 검토), 7공구(사전재해영향 검토)

* 측량 및 지반조사는 실시설계 수준으로 시행(전공구)

ㅇ 설계기간 : 16개월

□ 계약사항

ㅇ 공동계약 : 대표사 포함 5개업체 이하

ㅇ 입찰방법 : 사업수행능력평가(PQ) + 기술제안서 평가(TP)

ㅇ 기타사항 : 중복 낙찰제한(중복입찰 허용)

□ 향후일정(예정)

ㅇ 국토부 기본계획고시(‘14.12월 예정) → 입찰공고(‘14.12월, 기본계획고시 이후) → 제안서 평가 및 용역계약(’15. 1월)