2024년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제

등록번호

2024-22

담당부서

작성자

(시설본부 / 시설개량처)

(김정호/042-607-3787/0223kjh@kr.or.kr)

정 책 명

만경강제2교 개량공사

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경 : 만경강 하천 설계기준에 만족하도록 노후화된

만경강제2교를 개량하여 자연재해로부터 운행선 안전 확보

○ 추진기간 : 2018. 11. ~ 2029. 12.

○ 총사업비 : 1,451백만원

* 설계 17억원, 공사 1,322억원, 감리 86억원, 용지 26억원

○ 주요내용

- 교량개량공사(복선 신설 후 기존 선 철거)

* 연장 2,141m(토공 1,466m, 교량 675m), 사업 면적 90,615㎡

○ 추진경과

- 2018. 2. : 국가안전대진단 점검

- 2018. 7. : 호남선 만경강제2교(하선) 실시설계 착수

- 2019. 4. : 관계기관 협의(익산지방국토관리청 하천계획과 등)

- 2019.12. : 사업계획 변경(하선개량→상·하선 복선개량)

- 2023.10. : 실시설계 완료(복선 개량)

- 2024. 2. : 국토부에 사업실시계획 승인 신청

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
시설본부	최영환	본부장 직무대리	‘23.8.1～현재	시설본부 사업 업무총괄
	정희준	처장	‘23.7.17～현재	시설개량사업 업무총괄
	김훈	부장	‘23.1.18～현재	시설개량 사업관리
호남본부	유성기	본부장	‘22.9.1～현재	호남본부 소관사업 총괄
	윤학선	단장	‘23.7.17～현재	시설관리단 소관사업 총괄
	김기항	부장	‘23.1.30～현재	시설개량사업 총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

○설계자

- ㈜동부엔지니어링, ㈜제일엔지니어링

○시공자

- 미정, ‘24.5 발주 예정

○감리자

- 미정, ’24.5 발주 예정

추진실적

- 2018. 2. : 국가안전대진단 점검

- 2018. 7. : 호남선 만경강제2교(하선) 실시설계 착수

- 2019. 4. : 관계기관 협의(익산지방국토관리청 하천계획과 등)

- 2019.12. : 사업계획 변경(하선개량→상·하선 복선개량)

- 2022. 1. : 설계VE 시행

- 2022. 7. : 경관심의 시행

- 2022.11. : 설계심사 시행

- 2023. 9. : 공사 기간 적정성 검토 기술심의

- 2023.10. : 실시설계 완료(복선 개량)

- 2024. 2. : 사업실시계획 승인 신청(→국토교통부)