2022년 궤도분야 지급자재 구매·관리 관련 사전공지

2022. 2.

□ 목  적

ㅇ 2022년 궤도공사용 지급자재에 대한 구매발주 계획 및 입찰정보 등을 사전공지하여, 투명하고 공정한 입찰 환경조성 및 신규 업체 참여기회 제공

□ 구매 발주계획

ㅇ 문경∼이천 철도건설사업(문경∼충주 구간) 등 5개 사업, 레일 등 지급자재 6개 품목, 22건(548억원) 발주

< 2022년 구매 발주계획 >

물품명	사 업 명	단위	수량	규격 (규격별수량)	설계금액 (백만원)	비고
계					54,771
레일	문경~이천 철도건설 문경~충주	개	1,676	50N(215), 60E1(1,461)	3,584	5월
	삼성~동탄 광역급행철도	개	2,202	60E1(2,202)	4,727	7월
	도담~영천 복선전철	개	5,199	60E1(5,199)	11,438	9월
	대전차량기술단 인입철도 이설 궤도공사	개	360	50N(192), KR60(168)	716	12월
60kg 분기기	문경~이천 철도건설 문경~충주	틀	12	60E1 #8 고정(3), 60E1 #12 고정(1), 60E1 #12 가동(1), 60E1 #15 고정(5), 60E1 #15 가동(2)	2,072	5월
	삼성~동탄 광역급행철도	틀	7	60E1 #8 고정(1), 60E1 #8 SCO고정(2), 60E1 #10 고정(2), 60E1 #15 노스(2) * 콘크리트도상용	2,852	7월
	도담~영천 복선전철	틀	12	60E1 #12 등 (설계 중, 미정)	3,000	9월
	대전차량기술단 인입철도 이설 궤도공사	틀	17	60kgK #8 고정(2), 60kgK #10 고정(7), 60kgK #12 고정(7) 60kgK #12 SCO고정(1)	3,261	12월
50kg 분기기	문경~이천 철도건설 문경~충주	틀	7	50kg #8 고정(7)	438	5월
	대전차량기술단 인입철도 이설 궤도공사	틀	12	50kg #8 고정(11) 50kg #10 고정(1)	653	12월

물품명	사 업 명	단위	수량	규격 (규격별수량)	설계금액 (백만원)	비고
Bi-Block침목	문경~이천 철도건설 문경~충주	개	14,081	60E1, KR체결장치용 (14,081)	1,313	5월
	삼성~동탄 광역급행철도	개	34,029	60E1, KR체결장치용 (34,029)	2,982	7월
	도담~영천 복선전철	개	41,409	60E1, KR체결장치용 (41,409)	4,200	9월
	대전차량기술단 인입철도 이설 궤도공사	개	1,697	KR60, KR체결장치용 (1,697)	170	12월
KR형 레일체결장치	서해선 복선전철 궤도3공구	조	32,164	60E1레일용(32,164)	1,599	2월
	문경~이천 철도건설 문경~충주	조	40,162	60E1레일용(40,162)	1,847	5월
	삼성~동탄 광역급행철도	조	68,058	60E1레일용(68,058)	3,321	7월
	도담~영천 복선전철	조	82,818	60E1레일용(82,818)	3,835	9월
	대전차량기술단 인입철도 이설 궤도공사	조	3,394	KR60레일용(3,394)	168	12월
e-클립형 레일체결장치	문경~이천 철도건설 문경~충주	조	25,664	50N레일용(8,116), 60E1레일용(17,548)	242	5월
	도담~영천 복선전철	조	126,969	60E1레일용(126,969)	1,400	9월
PST-C형 패널	문경~이천 철도건설 문경~충주	조	750	PST-C형 토공용(20) PST-C형 터널용(730)	953	5월

*  수량 및 설계금액은 배선변경 등에 따라 일부 변경될 수 있음.

□ 계약시행 방안

ㅇ 입찰방법

1) 국제입찰 및 국내입찰 구분(전년도 대비 변경없음)

	< 기본원칙 >
「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등의 기획재정부장관이 정하는 고시금액」에 따라 6억 5천만원 이상의 물품의 경우 국제입찰 원칙

- 설계금액이 6억 5천만원 이상인 구매계약은 국제입찰 적용, 미만인 구매계약은 국내입찰 적용

2) 일반경쟁 및 제한경쟁 구분(전년도 대비 변경없음)

	< 기본원칙 >
-「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제7조와 같은 법 시행령 제21조에 따라 일반경쟁 원칙이며, 특수한 설비 또는 기술이 요구되는 물품제조계약의 경우 설비 및 기술 보유상황 또는 제조실적 제한 가능 -「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」제2조의2에 따라 추정가격이 2억원 미만의 물품인 경우 중소기업자 간 제한경쟁입찰 원칙

- 특수한 설비 또는 기술이 요구되는 분기기, KR형 레일체결장치, 사전제작형 철근콘크리트궤도(PST)패널은 기술 보유상황 또는 실적을 제한하는 제한경쟁입찰 적용, 이 외 품목은 일반경쟁입찰 적용

- 추정가격 2억원 미만의 물품은 중소기업자간 제한경쟁입찰 적용

*「국가계약법 시행규칙」 제25조에 따라 위 두 사항을 중복하여 제한할 수 있음.

3) 제한경쟁 입찰 품목의 입찰참가자격(전년도 대비 변경없음)

	< 기본원칙 >
-「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제21조 제1항 제3호에에 따라 특수한 설비 또는 기술이 요구되는 물품제조계약의 경우 설비 및 기술의 보유상황 또는 제조실적 제한 가능 -기획재정부 계약예규「정부입찰·계약 집행기준」 제5조 제2항에 따라“기술보유상황”이란 물품제조에 필요한 기술·공법을 개발 또는 보유한 경우, 기술도입 또는 외국업체와의 기술제휴의 방법으로 물품제조에 필요한 기술을 보유한 경우를 말함.

- (분기기) 납품실적이 있는 업체 또는「철도시설성능검증지침」에 따라 철도시설성능검증서를 교부받은 업체

- (KR형 레일체결장치) 납품실적이 있는 업체 또는 표준규격에 따른 공인시험기관 품질시험(구성품 관리시험, 조합체 성능시험)에 합격한 업체

- (사전제작형 철근콘크리트궤도 패널) 특허기술권리 보유자 또는 특허기술권리 보유자와 기술실시권 계약을 체결한 업체

ㅇ 낙찰적격심사 시행방법

1) 납품실적 배점만점 적용(전년도 대비 변경사항 있음. 2021년 사전공지함.)

	< 기본원칙 >
- 공단「물품구매 낙찰적격심사기준」을 따르며, 추정가격이“10억원 이상”일 경우 <별표1>에 따라 납품실적 평가를 시행함(배점한도 5점) - 같은 기준 제12조에 따라 물품의 특성에 따라 이 지침을 적용하기 곤란하다고 인정되는 사항에 대하여는 입찰설명서 등에 반영하여 집행할 수 있음.

- 국내의 납품실적 보유업체가 독과점 시장구조인 물품에 대하여 “모든 입찰참여 업체 납품실적 배점만점(5점)” 적용

· (대상) 분기기, 사전제작형 철근콘크리트궤도(PST-C형) 패널

* `21년이전 : 레일체결장치(KR형, e-클립형), 사전제작형 철근콘크리트궤도(PST) 패널

2) 납품실적 평가 시 세부기준(전년도 대비 변경사항 있음. 2021년 사전공지함.)

	< 기본원칙 >
- 공단「물품구매 낙찰적격심사기준」제6조에 따라 계약담당은 적격심사 시 적용할 납품실적 평가기준(계약목적물과 동등이상 또는 유사물품, 금액 또는 수량)을 입찰공고에 명시하여야 함. - 같은 기준 <별표1>에 따라 계약목적물과「동등이상 물품」이란 성능, 품질 등이 해당 입찰대상 물품 이상인 것이고「유사물품」이란 해당 입찰 대상물품과 동일 종류로 성능, 품질 등이 동등미만인 것임.

- 납품실적 평가 시 계약목적물과 「동등이상 물품」과 「유사물품」적용

· 대상 : 레일, KR형 레일체결장치, e-클립형 레일체결장치, Bi-block 침목

· 품목별 적용 기준

품 목	동등이상 물품	유사물품	납품실적 평가요소	비고
레 일	50kg레일, 60kg 레일	없음	금액
KR형 레일체결장치	철도용 레일체결장치	없음	금액
e-클립형 레일체결장치	철도용 레일체결장치	없음	금액
Bi-block 침목	철도 콘크리트침목 제품	PC(프리캐스트) 콘크리트 제품	금액

ㅇ 공동계약에 관한 사항(전년도 대비 변경없음)

	< 기본원칙 >
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제25조 및 같은 법 시행령 제72조에 따라 공동계약 원칙이나, 경쟁이 성립되지 않을 경우 불허(감사원 지적) - 「공동계약 운용요령(기획재정부 계약예규)」제9조(공동수급체의 구성)에 따라 해당 품목의 입찰참가자격을 갖춘 업체가 5개사 미만인 경우 담합 발생 소지가 있어 공동계약 불허

- 입찰참가자격을 갖춘 업체가 5개社 미만인 레일, 분기기, KR형 레일체결장치, e-클립형 레일체결장치는 공동계약 불허

- 입찰참가자격을 갖춘 업체가 5개社 이상인 Bi-block침목, PST패널은 공동계약 허용

ㅇ 분할납품 일정(전년도 대비 변경없음)

- (본사 발주 시) 최초 납품은 제조 준비기간(생산시스템 및 설비구축 등)을 감안하여 발주 후 약 4~5개월 후부터 시행, n차 납품은 반기 또는 분기별로 관리기준공정표(IPS) 일정에 맞춰 수립

* 원활한 생산을 위해 KR형 체결장치는 침목, PST패널 납품일정보다 한 달 전 납품

- (지역본부 계약관리 시) 품질조정회의 등에서 공사 추진 여건, 사업비 집행, 예산배정 등을 고려하여 공정에 지장을 주지 않는 범위에서 상호협의 조정

ㅇ 레일체결장치(KR형, e-클립형) 품질시험 확인사항

1) KR형 레일체결장치(기존 납품업체에 대한 성능시험 사항 변경)

- (입찰 시) 신규업체는 시제품에 대한 공인기관 시험성적서(조합체 성능시험, 구성품 관리시험) 제출

- (계약체결 후) 신규업체 또는 입찰공고일 기준 5년 이내의 납품실적이 없는 업체는 양산제품에 대한 조합체 성능시험 및 구성품 관리시험을 공인기관에서 실시하고, 시험성적서를 감독자에게 제출 후 납품 개시

※ 기존 납품업체의 조합체 성능시험 성적서가 5년을 초과할 경우 공단에서 직접 조합체 성능시험을 실시하여 주기적으로 성능 확인

2) e클립형 레일체결장치(전년도 대비 변경없음)

- (계약체결 후) 신규업체 또는 입찰공고일 기준 5년 이내의 납품실적이 없는 업체는 양산제품에 대한 조합체 성능시험 및 구성품 관리시험을 공인기관에서 실시하고, 시험성적서를 감독자에게 제출 후 납품 개시

□ 품목별 계약방법

1. 레 일

ㅇ 계약형태 : 총액계약

ㅇ 업체선정 방식

- 입찰방법 : 일반경쟁(국제입찰)  * 6억5천만원 미만인 경우 국내입찰

- 입찰참가자격

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 철도용 레일(세부품명번호 10자리 2524011501)을 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 업체

② WTO 정부조달협정 회원국의 국민으로서 동 회원국에서 생산, 제조(제품에 실질적 변형을 가져오는 공정)된 물품을 공급하는 자로 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가 등록한 자

※ (입찰공고문 및 추가특수조건 반영) 계약상대자는 「철도안전법」제27조(철도용품 형식승인) 및 제27조의2(철도용품 제작자승인)에 따라 국토교통부장관으로부터 철도용품(레일)의 형식승인 및 제작자승인을 받아야 함.

- 공동계약에 관한 사항 : 허용하지 아니함

- 낙찰적격심사 평가 세부기준

․납품실적 평가요소 : 금액 적용

․동등이상 물품 : 50kg레일, 60kg레일

․유사물품 : 없음

2. 분기기

ㅇ 계약형태 : 총액계약

ㅇ 업체선정 방식

- 입찰방법 : 제한경쟁(국제입찰)   * 6억5천만원 미만인 경우 국내입찰

- 입찰참가자격

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 철도용분기기(세부품명번호 10자리 2524020801)을 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 업체

② WTO 정부조달협정 회원국의 국민으로서 동 회원국에서 생산, 제조(제품에 실질적 변형을 가져오는 공정)된 물품을 공급하는 자로 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가 등록한 자

③ (50kg 분기기 발주의 경우) 50kg 분기기를 제조하여 납품한 실적이 있는 업체 또는 공단의「철도시설성능검증지침」에 따라 50kg 분기기에 대한 철도시설성능검증서를 교부받은 업체

③ (60kg 분기기 발주의 경우) 60kg 분기기를 제조하여 납품한 실적이 있는 업체 또는 공단의「철도시설성능검증지침」에 따라 60kg 분기기에 대한 철도시설성능검증서를 교부받은 업체

- 공동계약에 관한 사항 : 허용하지 아니함

- 낙찰적격심사 평가 세부기준

ㆍ납품실적 평가요소 : 모든 유효한 입찰자 만점(5점) 적용

3. Bi-block 침목

ㅇ 계약형태 : 총액계약

ㅇ 업체선정 방식

- 입찰방법 : 일반경쟁(국제입찰)  * 6억5천만원 미만인 경우 국내입찰

- 입찰참가자격

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 철로용 콘크리트침목(세부품명번호 10자리 2524050102)을 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 업체

② WTO 정부조달협정 회원국의 국민으로서 동 회원국에서 생산, 제조(제품에 실질적 변형을 가져오는 공정)된 물품을 공급하는 자로 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가 등록한 자

- 공동계약에 관한 사항 : 허용

- 낙찰적격심사 평가 세부기준

․납품실적 평가요소 : 금액 적용

․동등이상 물품 : 철도 콘크리트침목 제품

․유사물품 : PC(프리캐스트) 콘크리트 제품

4. KR형 레일체결장치

ㅇ 계약형태 : 총액계약

ㅇ 업체선정 방식

- 입찰방법 : 제한경쟁(국제입찰)  * 6억5천만원 미만인 경우 국내입찰

- 입찰참가자격

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 철도용 콘크리트침목체결구(세부품명번호 10자리 2524043401)를 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 업체

② WTO 정부조달협정 회원국의 국민으로서 동 회원국에서 생산, 제조(제품에 실질적 변형을 가져오는 공정)된 물품을 공급하는 자로 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가 등록한 자

③ KR형 레일체결장치를 제조하여 납품한 실적이 있는 업체 또는 국가철도공단 표준규격(KRS TR 0014) 및 국가철도공단 잠정표준규격(KRSA-T-2015-1005)에 따라 공인시험기관 품질시험(구성품 관리시험, 조합체 성능시험)에 합격한 업체

* 공인시험기관(국가표준기본법 제23조에 의한 한국인정기구로부터 인정을 획득한 시험기관) 시험성적서는 입찰공고일 기준 5년 이내에 발행한 시험성적서만 인정함.

※ (입찰공고문 및 추가특수조건 반영) 본 물품은 공단과 철도연이 공동으로 국산 개발하여, 실시권을 개방한 물품으로 계약상대자는 공단 「지식재산관리규정」 제28조(실시허여 등의 원칙)에 따라 특허권리 보유자(공단, 철도연)와 기술 실시권 계약을 체결하여야 함.

- 공동계약에 관한 사항 : 허용하지 아니함

- 낙찰적격심사 평가 세부기준

․납품실적 평가요소 : 금액 적용

ㆍ동등이상 물품 : 모든 종류의 레일체결장치

ㆍ유사물품 : 없음

5. e-클립형 레일체결장치

ㅇ 계약형태 : 총액계약

ㅇ 업체선정 방식

- 입찰방법 : 일반경쟁(국제입찰)  * 6억5천만원 미만인 경우 국내입찰

- 입찰참가자격 : 아래 자격을 갖춘 자이어야 한다

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 철도용코일스프링클립(세부품명번호 10자리 2524043801)을 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 업체

② WTO 정부조달협정 회원국의 국민으로서 동 회원국에서 생산, 제조(제품에 실질적 변형을 가져오는 공정)된 물품을 공급하는 자로 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가 등록한 자

- 공동계약에 관한 사항 : 허용하지 아니함

- 낙찰적격심사 평가 세부기준

․납품실적 평가요소 : 금액 적용

ㆍ동등이상 물품 : 모든 종류의 레일체결장치

ㆍ유사물품 : 없음

6. 사전제작형 철근콘크리트궤도(PST-C형) 패널

ㅇ 계약형태 : 총액계약

ㅇ 업체선정 방식

- 입찰방법 : 제한경쟁(국제입찰)  * 6억5천만원 미만인 경우 국내입찰

- 입찰참가자격 : 아래의 자격요건을 모두 충족하여야 합니다.

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 철로용 콘크리트침목(세부품명번호 10자리 2524050102)를 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 업체

② WTO 정부조달협정 회원국의 국민으로서 동 회원국에서 생산, 제조(제품에 실질적 변형을 가져오는 공정)된 물품을 공급하는 자로 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가 등록한 자

③ 특허권리 보유자(공단, 철도연, 삼표)와 사전제작형 콘크리트궤도(PST-C형) 기술실시에 관한 협약을 체결한 업체

- 공동계약에 관한 사항 : 허용

- 낙찰적격심사 평가 세부기준

․납품실적 평가요소 : 모든 유효한 입찰자 만점(5점)

□ 품질관리 이행사항

1. ITP(검사 및 시험계획서), ITC(검사 및 시험점검표) 운용

ㅇ 지급자재 품목별 ITP, ITC 운용으로 제작관리 및 검사업무 체계화

<참고> ITP, ITC 운용절차

지급자재 계약	▶	제조사 ITP/ ITC 작성	▶	건설사업관리기술자의 승인 (품질관리계획서에 포함)	▶	제작 착수, ITP/ITC 운용

* 「궤도분야 지급자재 구매관리 프로세스(P-구매관리-07)」에 표준안 참조(홈페이지 정보마당-공개자료실)

ㅇ ITP, ITC 작성 및 운용

1) 총 괄

- 공단 업무 프로세스 「궤도분야 지급자재 구매관리(P-구매관리-07)」별첨에서 해당 지급자재의 ITP, ITC 표준안 참고

- 제조사의 작업환경, 공정 특성, 품질중요도 등을 반영하여 ITP, ITC 표준안을 수정 운영  * 실제 가능한 부분을 표준규격 범위 내에서 자유롭게 변경 작성

- 건설사업관리기술자가 ITP, ITC 직접 운용, 제조사는 외관 및 치수 검사표 등 별첨 자료를 관리대장에 기록관리

* 건설사업관리기술자 검사 시 제조사는 ITC의 적부판정기준의 서류들을 제시할 수 있어야 함.

2) 제조사

<작성 시>

- 해당물품의 표준규격 및 현 실정(작업환경, 공정특성, 품질중요도 등)을 반영하여 표준안을 수정 사용

- ITC의 “적용문서(적부판정기준)”에 체크리스트를 확인할 수 있고 제시가능한 서류로 작성

- ITC의 별첨으로 외관 및 치수검사표의 측정위치, 측정기구를 반영

* 측정이 곤란한 치수는 한계게이지(GONO게이지)를 승인받아 활용하는 방향으로 검토

* 치수의 측정위치는 실제 측정이 가능한 곳으로 선정(자체검사표에 측정위치 표기)

- 협력사 제품을 사용할 경우 반입시 확인문서 및 검사방법(서류 및 샘플링) 반영

<운용 시>

- ITC의 별첨으로 삽입되는 외관 및 치수검사표를 대장으로 관리

* 건설사업관리기술자가 검사 시 ITC의 “적용문서(적부판정기준)”를 제시할 수 있어야 함.

3) 건설사업관리기술자

<작성 시>

- ITP 작성 시 품질중요도, 입회가능 여부 등을 고려하여 검사점을 직접 선정

* 실질적인 Hold Point(H로 표기, 필수확인점)와 Witness Point(W로 표기, 입회점)가 될 수 있도록 반영

- ITC 상 “적용문서(적부판정기준)”에 검사자가 실제 확인 가능한 서류, 검사방법의 포함여부 확인

- ITC의 별첨으로 외관 및 치수검사표의 측정위치, 측정기구를 반영여부 확인

<운용 시>

- 제조사에서 제시한 ITC의 적부판정기준 서류를 직접 확인하여 검사결과에 체크, 검사 결과 보관

2. 레일체결장치(KR형, e-클립형) 양산제품 품질시험

ㅇ KR형 레일체결장치

<입찰 시>

- 납품실적이 없는 신규업체는 시제품에 대한 공인기관 시험성적서(조합체 성능시험, 구성품 관리시험) 제출

* 입찰공고일 기준 5년 이내에 발행한 시험성적서만 인정

<계약체결 후>

- 신규업체 또는 입찰공고일 기준 5년 이내의 납품실적이 없는 업체는 계약체결 후 양산제품에 대한 조합체 성능시험 및 구성품 관리시험을 공인기관에서 실시하고, 시험성적서를 감독자에게 제출 후 납품 개시

* 시험에 소요되는 제반비용은 업체에서 부담

- 기존 납품업체의 조합체 성능시험 성적서가 5년을 초과할 경우 공단에서 직접 조합체 성능시험을 실시하여 주기적으로 성능 확인

ㅇ e클립형 레일체결장치

<계약체결 후>

- 신규업체 또는 입찰공고일 기준 5년 이내의 납품실적이 없는 업체는 계약체결 후 양산제품에 대한 조합체 성능시험 및 구성품 관리시험을 공인기관에서 실시하고, 시험성적서를 감독자에게 제출 후 납품 개시  * 시험에 소요되는 제반비용은 업체에서 부담

3. KR형 레일체결장치 생산공장 점검

ㅇ 국내 실용화제품인 KR형 레일체결장치의 Risk관리를 위하여 신규참여 업체에 대한 생산단계 전반을 점검

* 금년도에 한하여 KR형 레일체결장치의 기존업체도 생산공장 점검 시행

ㅇ 점검시기 : 양산제품 생산단계에서 시행

ㅇ 점검내용

- 사내 품질시스템 절차 등 품질관리 이행 실태

- 검사 및 시험계획서(ITP), 검사 및 시험점검표(ITC) 운용 상태

- 생산 및 시험 설비 구축 및 운용 상태, 제품 생산능력 및 공급 계획 등

4. PC제품(침목, PST패널) 생산설비 점검

ㅇ PC제품(침목, PST패널) 품질확보 및 원활한 수급을 위하여 신규참여업체에 대한 생산설비 및 시험장비 구축상태 점검

(공단 표준규격서) 제품 제조설비 중 품질에 영향을 끼치는 공정은 자동화하여 소정의 정밀도로 제작하여야 한다.

ㅇ 점검시기 : 계약체결 후 양산제품 생산착수 전

ㅇ 점검내용

- 콘크리트 침목 생산에 필요한 기본적인 생산공장 시설(제작시설, 시험실, 재료저장소, 보일러실 등)

- 제작설비 자동화 구축여부(콘크리트 타설장비, 진동장비, 양생시설, 탈형시설 등)

- 검사 및 시험계획서(ITP), 검사 및 시험점검표(ITC) 운용 상태

- 품질 인증서 보유 현황, 품질보증계획서 등 사내 품질시스템

- 제품 생산능력 및 공급계획

5. 제작도면 작성 책임

ㅇ 계약상대자는 생산 전에 표준규격 및 자재구매시방서의 불분명 사항, 오류, 누락, 상호 모순 등을 면밀히 검토하여 제작도면을 작성하고, 제작도면 상의 내용으로 인하여 품질에 문제가 발생치 않도록 조치

* 품질조정회의 등에서 건설사업관리단과 협의하여 추진

□ 기타 공지사항

ㅇ 입찰참가자격의 별도 제출서류는 입찰참가자격서류 제출기한까지 제출하여야 하며, 제출기한 이후에 제출된 서류는 어떠한 사유로도 인정하지 않습니다.

ㅇ 입찰참가 자격을 받기 위한 설비투자, 시제품 제작, 품질시험 등의 판단은 입찰참가 희망업체의 자유의사에 의해 결정한 것이므로, 이에 따른 소요비용 등에 대하여 공단은 어떠한 법적, 행정적 책임과 의무를 지지 않습니다.

ㅇ 공단 사업계획에 따라 구매시기, 구매수량, 업체선정 방식 등이 변경될 수 있으며, 입찰참가 희망업체는 이에 대한 이의를 제기할 수 없습니다.

ㅇ 계약상대자는 적기에 납품 하여야 하며, 만일 품질미달, 생산지연 등으로 수급에 차질이 발생할 경우 계약서 및 관련법에 따라 공단은 계약변경 또는 계약해지를 할 수 있으며, 이에 대한 모든 책임과 의무는 낙찰업체에게 있습니다.

ㅇ 계약상대자는 계약물품에 대하여 생산 및 납품과정에서 규격서, 도면, 시공성, 유지관리성, 성능 등 개선이 필요하다고 판단될 경우 감독자에게 통보하여 필요한 조치를 하여야 합니다. 특히 KR형 레일체결장치는 실용화 초기 단계이기 때문에 「기술 실시권 계약서 13조(실시제품 사후 관리)」에 의거 정보교환, 피드백 등 실용화 사후관리에 적극 협조하여 하여야 합니다.

ㅇ 계약상대자는 생산 전에 표준규격 및 자재구매시방서의 불분명 사항, 오류, 누락, 상호 모순 등을 면밀히 검토하여 제작도면을 작성하고, 제작도면 상의 내용으로 인하여 품질에 문제가 발생치 않도록 조치하여야 합니다.

위 내용과 관련하여 추가 질의 및 건의사항이 있으시면 담당자(신아영 과장)에게 전화(042-607-3344) 또는 전자우편(say@kr.or.kr)으로 연락하시기 바랍니다.