<호남고속철도>

1. 개요

목포

(임성리)

익

산

43.7㎞

오

송

정

읍

광주

송정

● 신설역(1)

● 개량역(5)

■ 차량기지(1)

경부

고속철도

천안아산

대전

서울

공

주

46.0㎞

42.1㎞

50.5㎞

48.6㎞

(230.9㎞)

■

군산선

전라선

경전선

부산

서대전

논산

김제

장성

함평

무안

차량기지

타당성조사중

호남선

182.3㎞

ㅇ 사업구간 : 오송~목포간 230.9㎞

ㅇ 사업기간 : 2006~2017년

오송~광주송정 2014년, 광주송정~목포 2017년까지 완공

ㅇ 사업비 : 기본계획('09.4.16) 11조 3,382억원/총사업비('10.7.29) 10조 4,901억원

ㅇ 효과 :  철도수송능력 향상과 빠른 교통체계 구축으로 반나절생활권 실현, 충청․호남지역의 균형발전 촉진

2. 투자계획

(단위 : 백만원)

총소요	기투자 (‘06~’09년)	2010년	2011년	2012년	13년이후
10,490,075	442,750	944,952	1,648,265	1,804,638	5,649,470
국고 : 5,245,038 자체 : 5,245,037	290,750 152,000	310,000 634,952	550,000 1,098,265	1,202,000 602,638	2,892,288 2,757,182
	기본설계 완료 노반 실시설계착수	노반실시설계완료 용지매수 노반공사착수	실시설계 (건축, 전기) 노반공사(계속)	노반공사(계속)	준 공

3. 공정 추진 실적(오송~광주송정)

구 분		‘10년 까지	‘11년				누계			비고
			당월	금년누계
				계획	실적	대비	계획	실적	대비
계		13.90	1.10	6.39	6.69	104.7	20.29	20.59	101.5
설 계		62.31	0.77	2.40	2.68	111.7	64.71	64.99	100.4
감 리		8.23	0.82	2.36	2.38	100.8	10.59	10.61	100.2
용 지		66.46	1.44	4.45	5.44	122.2	70.91	71.90	101.4
공사	계	12.48	1.13	2.32	2.58	111.2	14.80	15.06	101.8
	노 반	18.58	1.71	3.51	3.90	111.1	22.09	22.48	101.8
	궤 도	2.36	-	-	0.42	111.1	2.36	2.78	117.8
	건 물	-	-	-	-	-	-	-	-
	전 력	0.89	0.06	0.13	0.10	76.9	1.02	0.99	97.1
	통 신	2.60	0.06	0.20	0.19	95.0	2.80	2.79	99.6
	신 호	0.40	0.15	0.32	0.36	112.5	0.72	0.76	105.6
	차량기지	-	-	-	-	-	-	-	-
차 량 구 입		-	-	-	-	-	-	-	-